제286회 전주시의회 임시회

도  시  건  설  위  원  회

2012년도

주 요 업 무 계 획

건 설 교 통 국

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진계획		-------	8
	○	도 시 과	-------	8
	○	교 통 과	-------	14
	○	주 택 과	-------	24
	○	도 로 안 전 과	-------	34
	○	생 태 복 원 과	-------	48
	○	차 량 등 록 사 업 소	-------	59

일  반  현  황

□ 기  구 : 5과 1사업소 26담당

																건설교통국
	도 시 과 (3 담 당)							교 통 과 (6 담 당)							주 택 과 (5 담 당)							도로안전과 (5 담 당)							생태복원과 (3 담 당)							차량등록 사 업 소 (4 담 당)
	도시행정							교통행정							주택행정							도로행정							도심생태							관 리
	도시계획							대중교통							공동주택							도로시설							노송천복원							등 록
	토지관리							택시화물							일반건축							도로정비							하천관리							의무보험
								교통지도							주거환경정 비							민 방 위														건설기계
								교통시설							주택재개발							재난관리
								교통정보

□ 정‧현원

과 별		총 계	일 반 직						계약	기능
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	122	1	6	26	32	31	7	0	19
	현 원	122	1	6	26	58	11	1	1	18
도 시 과	정 원	15	1	1	3	5	2	2		1
	현 원	15	1	1	3	8	1			1
교 통 과	정 원	28		1	6	9	7			5
	현 원	28		1	6	12	3		1	5
주 택 과	정 원	20		1	5	4	9	1
	현 원	20		1	5	12	2
도로안전과	정 원	20		1	5	7	4			3
	현 원	20		1	5	10	2			2
생태복원과	정 원	12		1	3	4	3			1
	현 원	12		1	3	4	2	1		1
차량등록 사 업 소	정 원	27		1	4	3	6	4		9
	현 원	27		1	4	12	1			9

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
도 시 과	○ 전문건설업 등록 관리 ○ 장기미집행 도시계획시설 매수청구 ○ 도시계획결정ㆍ지적고시, 도시계획사업 시행인가 ○ 도로명주소 부여사업 관리, 개별공시지가, 지적측량검사
교 통 과	○ 교통종합계획 수립 ○ 대중교통(버스, 택시, 화물) 업무추진 ○ 자동차운송사업체(버스, 택시, 화물 등) 지도감독 ○ 공영주차장 확충 및 관리, 교통영향평가업무 ○ 교통안전시설물 설치 관리, 교통사고 줄이기 사업 ○ 교통신호, 정보시설 설치 및 운영관리 ○ 지능형 교통체계(ITS) 설치 및 운영관리
주 택 과	○ 저소득계층 임대보증금 지원, 저소득가구 전세자금 지원 ○ 주택건설사업계획승인, 사용검사, 주택정책 수립 ○ 건축인ㆍ허가, 건축심의, 농촌지역 환경개선사업 ○ 공공건물 신축, 도시주거환경개선사업 ○ 주택재개발ㆍ재건축 추진
도로안전과	○ 도로부지관리, 도로안내표지판 설치관리 ○ 도로포장 보수지도, 자전거도로 시설, 가로등 관리 ○ 신규 도로개설 및 용지보상, 도시가로망 확충사업 ○ 가로환경 및 노점상 지도단속, 자전거이용 활성화 ○ 민방위, 재난방재 종합계획수립 및 재난재해대책 추진
생태복원과	○ 도심생태 복원계획 수립, 전주시 빗물관리시설 설치사업 ○ 노송천복원 프로젝트 추진 ○ 하천 기본계획 수립 고시 및 하천 유지관리 업무추진 ○ 생태하천 복원사업 추진
차량등록 사 업 소	○ 자동차등록(전산입력, 자료관리 및 증명발급 등) ○ 자동차 및 건설기계 과태료 부과, 건설기계사업자, 조종사면허관리 ○ 건설기계등록(전산입력, 증명발급, 검사최고, 정비명령 등) ○ 무보험차량조사(손해배상보장법위반 과태료, 범칙금부과 등) ○ 자동차등록번호판 제작 관리

기  본  현  황

□ 도시계획 연혁

년 월 일	고 시 청	번 호	계획면적 (㎢)	목표 년도	계획인구	주 요 내 용
1938. 5. 9	조선총독부	403	19.76	1948	100,000	도시계획구역 결정(1차)
1966. 2.10	국토해양부	2,188	108.71	1983	550,000	도시계획 재정비(2차)
1970. 4.14	″	178	157.22	1986	500,000	도시계획 재정비(3차)
1973. 6.27	″	258	313.20			개발제한구역 216.4㎢ 지정
1974. 8.14	″	272	313.20			도시계획 재정비(4차)
1976. 3.27	″	37	313.20			도시계획 재정비(5차)
1986. 5. 8	″	206	313.20	1991	610,000	도시계획 재정비(6차)
1995. 6.29	전라북도	112	313.20	2001	860,000	도시계획 재정비(7차)
2003. 6.26	국토해양부	161	302.67			개발제한구역 225.4㎢해제
2005. 7.29	전라북도	186	313.18	2010	748,000	도시계획 재정비(8차)

□ 용도지역 -- 4개지역 197.63㎢(비도시지역 8.65㎢제외)

구분	주 거 지 역				상업 지역	공 업 지 역				녹 지 지 역
	계	전용주거	일 반 주 거	준 주거		계	전용공업	일반 공업	준 공업	계	생산 녹지	자연 녹지	보전 녹지
면적	35.23	0.30	33.96	0.97	4.50	6.28	1.44	4.17	0.67	151.62	25.13	75.49	51.00
비율 (%)	17.8	0.1	17.2	0.5	2.3	3.2	0.7	2.1	0.4	76.7	12.7	38.2	25.8

□ 용도지구 ---------------- 7개지구 19,153,102㎡

지 구 명	개 소 수	면 적(㎡)	비 고
고 도	16	7,809,349
방 화	21	4,069,208
미 관	79	3,305,263
자연취락	157	3,300,963
경 관	7	413,140
시설보호	1	249,000
보 존	2	6,179

□ 토    지

(단위 : ㎢)

구분	합 계		대 지			임 야			기 타
	필지수	면적	필지수	면적	%	필지수	면적	%	필지수	면적	%
계	193,866	206.0	75,677	27.5	13.4	10,965	69.5	33.7	107,224	109.0	52.9

□ 운수업체

○ 버  스

(단위 : 대)

구분	총계	시 내 버 스						관광(전세)	비고
		소계	신성	전일	제일	호남	시민
대수	859	393 (11)	98 (3)	93 (2)	93 (3)	76 (2)	33 (1)	소계 466 ▪ 20개사 : 431 ▪ 영업소 : 4개사/35

※ ( ) 숫자는 예비차량

○ 택  시

(단위 : 대)

구 분	계	개인택시	회사택시	비 고
대 수	3,912	2,348	22개사/1,564대

○ 화  물

(단위 : 대)

구 분	계	개별사업자			일반사업자(5톤 이상)			비고
		소계	용달	개별	소계	법인	개인
대 수	3,694	1,650	879	771	2,044	1,938 (107개회사)	106

○ 주 차 장

(단위 : 대)

구 분	계	노 상	노 외				부 설
			소계	공 영	공한지	민 영
개소 /면수	15,300 /248,941	91 /4,239	441 /16,811	30 /2,055	56 /590	355 /14,166	14,768 /227,891

□ 교통시설

(단위 : 개소, 개)

교차로	LED 신호등 (개소)	제어기	보행자 음 향 신호기	보행자 잔 여 표시기	교 통 표지판	차 선	횡단 보도	횡단보도 조명등
604	604	476	242	848	10,744	▪1,108개노선 L=738㎞ ▪차선 L=2,604km	1,950 ▪신호 : 1,200 ▪비신호 : 750	183개소 502등

□ 지능형 교통시설

(단위 : 개소, 개)

BIS 설비	검 지 기			가변정보 전광판				교통흐름 관 찰 용 CCTV
안내단말기 (BIT)	소계	신호용	구간용	소계	동영상	문자식	도형식
148	533	371	162	14	1	10	3	43

□ 주    택

(단위 : 세대)

구 분	계	단독주택	다세대주택 동당660㎡미만	연립주택 (4층이하)	아파트 (5층이상)	가구수	주 택 보급율
주택수	197,297	47,560	2,752	4,557	142,428	174,292	113.20 %
비율 (%)	100	24.11	1.39	2.31	72.19

□ 도    로

(단위 : 개소, ㎞)

구 분	계		고속국도		일반국도		지 방 도		시 도
	노선	연장	노선	연장	노선	연장	노선	연장	노선	연장
총연장	1,917	694	1	5	5	69	3	22	1,908	598
포장도	1,917	694	1	5	5	69	3	22	1,908	598
포장율 (%)		100		100		100		100		100

※ 도로율 : 16.38%(도로면적/시가지면적)

□ 교량 및 기타시설물

(단위 : 개)

구분 계	교 량					육교	지하 보도	지하차도	터널	비고
	소계	고속 국도	일반 국도	지방도	시도
153	124		38	2	84	16	6	5	2

※ 장대교량 (삼례교 : 570m, 회포대교 : 707m)

□ 자동차등록

(단위 : 대)

합 계	승 용 차	승 합 차	화 물 차	특 수 차
245,141	196,073	11,734	36,795	539

□ 건설기계조종사 면허현황

(단위 : 건)

계	불도저	굴삭기	로더	지게차	기중기	롤러	기 타 (3톤미만포함)
9,646	413	3,499	928	3,950	375	247	234

□ 도시 주거환경정비 예정지구 현황

방 식	개소수	면 적 (㏊)	세 대 수
			계	현 재	증 가
계	60	404.7	57,666	23,675	33,991
주택재개발	25	205.7	33,771	11,216	22,555
주택재건축	10	33.8	7,008	4,665	2,343
주거환경개선	16	98.0	8,805	4,425	4,380
사업유형유보	8	63.4	7,909	3,196	4,713
도시환경정비	1	3.8	173	173	-

□ 하천현황

(단위 : ㎞)

구 분		개소	하천연장	제 방 연 장			개수율 (%)	비고
				계	기개수	미개수
계		24	102.2	177.7	141.3	36.4	79.5
법정하천	소 계	21	96.2	164.9	134.9	30.0	81.8
	국가하천	3	14.8	28.8	28.8	-	100.0
	지방하천	18	81.4	136.1	106.1	30.0	78.0
소 하 천		3	6.0	12.8	6.4	6.4	50.0

도 시 과  소 관

ꊱ	장기미집행 도시계획시설 대지보상	----	9
ꊲ	도시기본계획 및 도시관리계획 재정비	----	10
ꊳ	가련산공원 진입도로 개설	----	11
ꊴ	도로명주소의 조기정착을 위한 홍보강화	----	12
ꊵ	2012년도 개별공시지가 조사	----	13

장기미집행 도시계획시설 대지보상

○ 시민의 재산권 보호를 위한 장기미집행 도시계획시설 대지보상

○ 매수청구의 절차개선 및 처리기간 단축으로 시민편익 증진

□ 현    황(’02 ~ ’11.12월말 현재)

(단위 : 백만원)

구 분	장기미집행 도시계획시설 (대지)(A)	매수청구분 (B)	처리완료(C)					미보상 (D)	비율 (C/B)
			소계	보상	시설폐지	취하	제외
필 지	4,650	217	215	126	47	36	6	2	99%
면적(㎡)	319,591	38,293	37,816	22,536	7,839	6,942	499	477 (지장물포함)
보상액 (추정액)	368,000	26,309	26,209	18,820	4,327	2,379	683	100

□ 매수청구 대상

○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제47조 제1항

- 10년 이상 미집행 도시계획시설(실시계획인가 및 절차진행 제외)

- 지목이 대지인 토지와 당해 토지에 있는 건축물 및 정착물

□ 2012년도 보상계획

○ 사 업 비 : 1,135백만원(대지 2,000㎡ 정도)

○ 사업내용 : 매수 접수되어  결정된 토지 및 건축물 신속 보상실시

○ 매수청구 절차 개선으로 쉽고 빠르게 처리

- 시홈페이지 온라인 접수, 매수결정 기간 50% 단축(6개월 ⇨ 3개월)

- 총괄 및 사업부서 현지 합동출장 원스톱 처리

도시기본계획 및 도시관리계획 재정비

○ 국토계획법 및 도시계획수립지침에 의거 매 5년마다 계획을 재검토

○ 도시공간구조와 토지이용계획을 재정립해 지속가능한 도시발전 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 행정구역 전역 206㎢

○ 사업기간 : 2009.  5 ~ 2012. 12.

○ 사업내용 ┌ 도시기본계획(시가화용지, 보전용지, 시가화예정용지 검토) 1식

└ 도시관리계획(용도지역․지구, 도로 등 54개 도시계획시설 재검토) 1식

○ 용 역 비 : 1,414백만원(‘09년 700, ‘10년 400, ’11년 314)

□ 추진상황

○ 도시기본계획(재정비) 추진

- 공청회 개최 --------------------------------- 2010. 12. 17.

- 주민의견청취(공휴일제외 14일간) - 2010. 12. 20 ~ 2011.  1.  6.

- 의회 의견청취(완주군의회 포함) ------------- 2011.  1. 28.

- 시 도시계획위원회 자문(원안자문) ----------- 2011.  3. 29.

- 기본계획 승인신청(전라북도) ---------------- 2011.  5. 19.

- 중앙부처 및 관련기관 협의 ---------------- 2011.  6 ∼ 12.

□ 쟁점사항 및 대책

○ 재개발지역의 고도지구 해제와 주거지역 종상향(1→2종)요구 다수민원 예상

⇨ 주민․전문가 및 단체 등 공론화를 통해 객관적 타당성 기준 마련

□ 금후계획

○ 도시기본계획 도 도시계획위원회 심의 및 승인(도) ----- 2012.  2.

○ 도시관리계획(재정비) 결정 ----------------------- 2012. 12.

가련산공원 진입도로 개설

○ 병무청지구 재개발사업 민원해결을 위한 기상대 이전사업 추진으로

○ 새로운 기상대 이전부지와 주민들이 이용하는 진입로 확장개설이 필요한 실정임

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진동 하가마을 ~ 가련산공원

○ 사업기간 : 2011. 12 ~ 2012. 12.

○ 규    모 : L=275m, B=8m

○ 사 업 비 : 800백만원(보상 300, 공사 500)

- 기 투 자 : 500백만원, ‘12년 소요예산 : 300백만원(미확보)

□ 추진상황

○ 가련산 공원 조성계획(기상대) 결정 ----------- 2009.  8. 26.

○ 전주기상대 진입을 위한 도시계획시설(도로) 결정 - 2010.  1.  8.

○ 기상대 정부 청사수급관리계획 승인(행자부)  --- 2010.  5. 26.

○ 토지수용재결 및 매입완료 : 총 48필지 1,439㎡ - 2011.  5. 20.

○ 진입도로 공사착공(총괄발주) ----------------- 2011. 12. 27.

□ 금후계획

○ 진입도로 공사 완공 ----------------------------- 2012. 12.

○ 전주기상대 청사 완공 이전 ----------------------- 2013.  6.

※ 소요사업비 7,250백만원 국비로 전액 확보

도로명주소의 조기정착을 위한 홍보강화

○ 도로명주소가 법적주소로 전환(’11. 7. 29)되고 2014년부터 전용 사용

○ 시민의 혼란을 방지하고 도로명주소 사용을 정착시키기 위하여

다양한 홍보매체를 활용, 도로명주소 사용 등 법적주소 전환내용 홍보

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2012.  1 ~ 12.

○ 소요예산 : 47백만원

○ 홍보방법 : 다양한 홍보물, 대중매체를 적극 활용하여 집중홍보

○ 홍보내용 : 도로명주소 시행시기, 활용내용 등

□ 추진상황

○ 도로명주소 정비 및 시설물 설치 ------------------ 2010.  2.

○ 주소사용자 방문고지 및 민원처리 ----------------- 2011.  7.

○ 도로명주소 고시(법적주소 전환) -------------- 2011.  7. 29.

○ 주민등록표 및 새올행정시스템 주소전환 ------- 2011. 10. 31.

○ 도로명주소 정착을 위한 홍보 : 17종 693회 방송광고 및 교육, 캠페인 실시

□ 홍보 강화계획

○ 다양한 홍보매체를 활용하여 홍보효과 제고(TV, 라디오 등)

○ 도로명주소 알리기 홍보이벤트 실시(홍보부스 설치)

○ 각급 기관･단체 등 조직을 활용 홍보역량 극대화

○ 자라나는 꿈나무를 대상으로 하는 홍보․교육

○ 다양한 홍보물 제작･활용

□ 금후계획

○ 공적장부 주소전환 완료 -------------------------- 2012. 12.

○ 도로명주소 전용 사용 ---------------------------- 2014.  1.

2012년도 개별공시지가 조사

○ 정확한 토지특성조사와 지가 산정으로 공신력을 제고하고 토지관련

국세․지방세 및 각종 부담금 부과기준으로 활용

□ 개    요

○ 근거법률 :『부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률』

○ 대상필지 : 136,644필지(표준지 3,391필지)

- 사 유 지 : 122,749필지,     - 국ㆍ공유지 : 13,895필지

○ 조사기준일 : 연 2회(1. 1 기준,  7. 1 기준)

○ 결정ㆍ공시 : 5월 31일, 10월 31일

□ 추진상황

○ ’11년 개별공시지가 조사산정 결정 공시 : 136,540필지

○ ’11년 개별공시지가 변동자료(분할, 합병 등) 정리 : 3,952필지

○ ’12년 개별공시지가 조사계획 수립 ----- 2011. 11. 29 ~ 12. 24.

○ ’12년 표준지가격조사표, 지역분석조서 자료제공 : 3,391필지

□ 금후계획

○ 1. 1기준 토지특성조사 및 지가산정(정기분) - 2012.  1.  2 ~  3. 30.

○ 산정지가 검증 공람 및 결정공시 ------- 2012.  4.  2 ~  5. 31.

○ 7. 1기준 토지특성조사 및 지가산정(수시분) - 2012.  7.  2 ~  8. 17.

○ 산정지가 검증 공람 및 결정공시 ------- 2012.  8. 20 ~ 10. 31.

교 통 과  소 관

ꊱ	교통특별회계 세외수입 통합시스템 구축	----	15
ꊲ	공영주차장 및 소규모 주차장 조성	----	16
ꊳ	시내버스 현금자동집계기 구축사업	----	17
ꊴ	시내버스 행선지판 LED 교체사업	----	18
ꊵ	시내버스 환승정류장(회차지) 조성사업	----	19
ꊶ	개인택시 카드단말기 설치 지원	----	20
ꊷ	주차질서 확립을 위한 불법주정차 단속 강화	----	21
ꊸ	어린이보호구역 개선사업	----	22
ꊹ	승강장 버스도착안내단말기(BIT) 확충	----	23

교통특별회계 세외수입 통합시스템 구축

○ 자동차관련법, 도로교통법, 손배법 과태료의 체납액 합계가 30만원

이상의 경우 차량번호판을 영치할 수 있도록 질서위반행위규제법

시행령 개정으로 통합시스템을 구축 특별회계 세외수입 징수율 제고

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2012.  1 ～  6.

○ 구축내용

- 차량등록사업소 및 구청의 교통관련 세외수입시스템 구축

(자동차관리법 과태료, 손배법 과태료, 도로교통법 과태료,

교통유발 부담금, 운수사업법 과태료, 무단방치관리 과태료 등)

- 탑재형 자동차 번호판 영치시스템 구축(2대)

○ 사 업 비 : 60백만원

□ 운영상 문제점 및 대책

○ 부서별로 과태료를 부과징수하고 있어 과태료 조회 및 납부시 납세자

불편 가중

⇨ 전국 어디에서나 체납액을 조회․납부할 수 있도록 행안부의 세외수입 통합

시스템에 교통특별회계 세외수입도 통합 운영될 수 있도록 데이터 구축

⇨ 과태료 통합시스템을 구축하여 과태료 체납액 합계가 30만원 이상인 경우

자동차 번호판을 영치할 수 있는 환경 구축

□ 추진계획

○ 차량등록사업소 과태료 세외수입 통합시스템 자료 변환 - 2012.  2.

○ 양구청 과태료(도로교통법) 새올행정시스템 자료 구축 - 2012.  5.

○ 교통특별회계 세외수입 통합시스템 구축 ---------------- 2012.  6.

○ 탑재형 자동차 번호판 영치시스템 구축 ----------------- 2012.  6.

공영주차장 및 소규모 주차장 조성

○ 주차문제로 교통정체 등 주차난이 심각한 지역을 주차 수급실태 조사결과에 따라 공영주차장 조성 및 도심지․주택 밀집지역에 소규모 주차장 조성

○ 인근 도시로의 출퇴근차량에 대한 카풀주차장 조성으로 시민편익 도모와 에너지절약에 기여

□ 사업개요

○ 조성규모 : 21개소 870면 정도

- 서부신시가지 주차장 : 17개소 670면 정도

- 우아1동 공영주차장 및 소규모주차장 : 3개소 150면

- 카풀주차장 : 1개소 50면 정도(박물관 또는 원당교차로 주변)

○ 사업기간 : 2012.  1 ~ 12.

○ 사 업 비 : 3,912백만원

※ 주차수급 실태조사 순위에 의한 공영주차장 및 소규모 주차장 조성

□ 2011년 추진상황

○ 공영주차장 조성완료(삼천2동 외)        : 8개소 682면

○ 소규모 공영주차장 조성완료(인후2동 외) : 3개소  68면

○ 서부신시가지 주차장 조성완료(마전 외) : 2개소  74면

□ 추진계획

○ 부지매입 및 공유재산관리계획 변경 --------- 2012.  2 ~  6.

○ 서부신시가지 주차장부지 포장공사 --------- 2012.  2 ~  6.

○ 도시계획시설 결정 및 실시설계 용역 -------- 2012.  6 ~  9.

○ 주차장 조성공사 --------------------------- 2012.  9 ~ 12.

시내버스 현금자동집계기 구축사업

○ 시내버스 운송수입의 약 40%에 달하는 현금수입금의 객관적이고

정확한 산정을 위해 현금자동집계기를 구축하여 재정지원 적정성 확보

□ 사업개요

○ 설치대상 : 시내버스 392대(고산이북 운행 10대 제외)

○ 사업기간 : 2012.  2 ∼  9.

○ 사 업 비 : 400백만원

○ 사업방법 : 현금인식요금함 임대방식(5년간)

□ 문 제 점

○ 단순히 현금수입금의 투명성 확보를 위해 매년 4억원이상 5년간

총 20억원이 소요됨(투입되는 20억원은 소멸되는 예산임)

- 준공영제 시행 일부 지자체에서 정확한 수입금 산정을 위해 도입

- 지폐 투입시간 지체발생, 기계 장애발생, 수입금 오류발생

○ 시내버스 이용객들은 당장 체감할 수 있는 서비스개선 대책 요구

□ 대    책

○ 현금인식요금함 설치 운영중인 지자체 사례검토 후 추진(인천, 광주, 여수)

○ 투명성 확보를 위해 투입되는 소멸 예산

- 시민들이 현금수입금을 신뢰할 수 있는 현금실사 방법을 최소비용

으로 추진

- 이용시민들이 체감하는 서비스개선 및 향상 정책발굴 추진

□ 추진계획

○ 시내버스 재정지원체계개선방안 용역 완료후 추진 - 2012.  8~

시내버스 행선지판 LED교체 사업

○ 야간 시인성 저하 및 영문표출 불가 등으로 인한 이용승객의 불편을

해소하고 전주이미지에 맞는 디자인 표출

□ 사업개요

○ 설치대상 : 392대

○ 설치계획 : 120대

○ 사업기간 : 2012.  4 ~  9.

○ 사 업 비 : 400백만원

○ 지원형태 : 민간보조

□ 추진방향

○ 민간보조 사업으로 시내버스 업체에서 추진시 협상에 의한 방식으로

발주 유도하여 우수한 업체가 선정 될 수 있도록 추진

○ 업체 선정 심사위원회 구성시 의회, 노사, 시민단체, 전문가, 공무원 등

참여 의견수렴 후 선정

□ 문제점 및 대책

○ 전체 시내버스 392대 중 120여대를 설치하므로 잔여차량 확대 필요

⇨ LED행선지판 설치 운영 후 효과를 판단하여 전체차량 설치확대

□ 추진계획

○ LED행선지판 구축계획 수립 및 발주 ------------- 2012.  4.

○ 행선지판 장착 및 사업완료 ---------------------- 2012.  9.

시내버스 환승정류장(회차지) 조성사업

○ 전주시 시내버스 노선체계를 지․간선제로 개편함으로써 환승 및

회차공간 확보를 위해 주요 환승지점에 시내버스 환승정류장(회차지

겸용)을 조성하여 이용객에 대한 서비스 개선

□ 사업개요

○ 설치대상 : 외곽지역 6개소

(평화동, 봉동, 전주대, 삼례, 광역매립장 인근, 소양 방면)

○ 사업기간 : 2012.  2 ∼ 2015. 12.

○ 총사업비 : 15,000백만원

2012년 사업내용

○ 위    치 : 교도소 방면(충전소 시설문제 해결)

○ 사 업 비 : 4,000백만원

○ 예산확보액 : 700백만원

○ 사업규모 : 바닥면적 5,000～7,000㎡/ 환승정류장, 편익시설, 충전소 등

□ 문제점 및 대책

○ 가스충전소 및 환승센터 구축시 기피시설로 인식하여 주민반발 예상

⇨ 주변여건을 충분히 고려하여 추진

○ 2012년 예산 7억 반영으로 추가 예산확보 필요

□ 추진계획

○ 환승정류장 조성계획 수립 ------------------------ 2012.  2.

○ 재정투융자심사 ---------------------------------- 2012.  3.

○ 대상 부지매입 ------------------------------ 2012.  5 ～  8.

○ 도시계획시설 결정 및 실시설계 -------------- 2012.  8 ～ 12.

○ 환승정류장 조성공사 ----------------------- 2013.  2 ～  8.

개인택시 카드단말기 설치 지원

○ 교통카드, 신용카드 영수증 발행으로 시민편의 제공과 한옥마을 등

전주를 찾는 관광객 증가 및 관광도시를 지향하는 천년전주의 이미지

향상을 위해 도입 필요

□ 사업개요

○ 사 업 량 : 1,348대(개인택시 2,348대 중 브랜드사업 제외차량)

○ 사 업 비 : 445백만원〔시비 312(70%), 자부담 133(30%)〕

- 산출기초 : 1,348대 × 330,000원 = 444,840천원

○ 사업기간 : 2012.  2 ~  7.

○ 사업내용 : 카드단말기(교통카드 겸용) 설치

□ 2011년 추진상황

○ 개인택시 브랜드화 사업(한옥콜 택시)

- 사 업 비 : 1,000백만원(시비 700, 자부담 300)

- 사 업 량 : 개인택시 1,000대

- 주요기능 : 콜서비스, 교통카드 및 신용카드 결제, 영수증 발행,

위치정보(GPS) 제공 등

□ 추진계획

○ 보조금 신청 및 교부 ----------------------------- 2012.  2.

○ 카드단말기 사업자 선정 -------------------------- 2012.  4.

○ 차량내 카드단말기 설치 -------------------------- 2012.  6.

○ 카드단말기 설치 홍보 및 운행 -------------------- 2012.  7.

주차질서 확립을 위한 불법주정차 단속강화

○ 단속차량 문자알림서비스 및 각종 시설 정비로 선진 주‧정차 질서를

유도하고, 불법 주‧정차에 대해서는 강력단속 추진

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2012.  1 ～  6.

○ 사 업 비 : 450백만원

○ 사업내용 : 문자알림 서비스 및 무인단속 CCTV 설치 등

□ 단속강화 내용

선진 주‧정차 문화정착 유도사업

○ 불법주정차 문자알림 서비스 추진 : 100백만원(완산‧덕진)

○ CCTV 단속지역 안내표지판  설치 : 30백만원(140개소, 2011계속사업)

- 단속지역 전‧후방 80m에 단속안내 표지판 설치 : 단속구간 예고

- CCTV회로내 LED 안내판 설치 : 단속차량 예고 및 단속내용 알림

○ 공‧민영 주차장 안내표지판 및 지도제작 : 20백만원(100개소)

무인단속 CCTV 설치 및 단속강화

○ 불법주정차 무인단속 CCTV 설치 : 300백만원(10개소)

○ 무인단속 CCTV 단속기준 강화 : 문자서비스 시행이후(‘12. 3월)

- 단속시간 : 출퇴근시간대 ⇨ 07:00～22:00, 단 11:30～13:30 제외

- 유예시간 : 20분 ⇨ 10분, 단 기존 5분지역 11개소는 택시 정차 등으로 제외

□ 추진계획

○ 불법 주정차 문자알림 서비스 시행 홍보 ------ 2012.  2 ～  3.

○ 공영․민영 주차장 안내표지판 설치 및 지도제작 -- 2012.  2 ～  6.

○ CCTV 단속지역 안내표지판  설치 ----------- 2012.  3 ～  6.

○ 불법주정차 무인단속 CCTV 설치 ----------- 2012.  3 ～  6.

○ 불법주정차 단속강화 ----------------------- 2012.  3 ～

어린이보호구역 개선사업

○ 교통약자인 어린이를 교통안전 사고로부터 보호하기 위하여 실질적인

안전대책 강구

○ 어린이집 등 보육시설의 교통안전을 위한 시설보강

□ 사업개요

○ 대    상 : 어린이보호구역 148개소

○ 사업내용 : 인도설치, 방호울타리, 시인성 확보시설, 표지판 등

○ 총사업비 : 22,576백만원(국비 50%, 시비 50%)

○ 사업기간 : 2008 ~ 2013(6개년)

○ 추진실적 : 중앙초등학교 외 120개소 정비완료(11,836백만원)

어린이 말하는 CCTV설치 37개교 252대 구축완료(2,750백만원)

2012년 사업내용

○ 대    상 : 동신초교 외 31개 어린이보호구역

○ 사업내용 : 인도, 방호울타리, 시인성 확보시설, 어린이말하는 CCTV 구축(50대) 등

○ 사 업 비 : 2,166백만원(국비 1,083, 시비 1,083)

○ 사업기간 : 2012.  1 ~ 12.

□ 문제점 및 대책

○ 유치원, 어린이집 등 보육시설 주변 주민의 인도 및 휀스 설치 반대로

사업추진 어려움

⇨ 안전한 통행로 확보 방안 등 지역주민 적극 설득

□ 추진계획

○ 실시설계 및 공사발주 ---------------------- 2012.  2 ~  3.

○ 개선공사 추진 ---------------------------- 2012.  3 ~ 12.

승강장 버스도착안내단말기(BIT) 확충

○ 시내버스의 정확한 도착시간 안내 및 노선, 목적지 등을 승강장에서

사전 검색할 수 있는 버스도착안내단말기(BIT) 확대 설치로 대민

서비스 제고

□ 사업개요

○ 대    상 : 시내버스 주요 승강장

○ 사업규모 : 승강장 버스도착안내단말기(BIT) 22대 설치

○ 사 업 비 : 360백만원

○ 사업기간 : 2012.  2 ～  6.

○ 기 설 치 : 승강장 버스도착안내단말기 148개소

□ 추진계획

○ 버스도착안내단말기(BIT) 설치장소 선정 ---------- 2012.  2.

○ 설치공사 발주 및 계약 --------------------------- 2012.  2.

○ 설치공사 준공 ----------------------------------- 2012.  6.

【 참고사진 】

승강장 버스도착 안내단말기(양면형)		버스도착안내화면		노선별 버스위치 검색 화면

주 택 과  소 관

ꊱ	저소득계층 임대보증금 지원	----	25
ꊲ	노후 공동주택관리비용 지원	----	26
ꊳ	빈집 리모델링을 통한 ꡒ희망의집ꡓ 추진	----	27
ꊴ	농촌 주거환경개선사업	----	28
ꊵ	농촌마을 빈집ㆍ슬레이트 정비 및 주택개량사업	----	29
ꊶ	사회취약계층 주택개ㆍ보수사업	----	30
ꊷ	아중도서관 신축공사	----	31
ꊸ	도시 주거환경개선사업	----	32
ꊹ	주택재개발ㆍ재건축사업 추진	----	33

저소득계층 임대보증금 지원

○ 무주택 기초생활수급자가 장기임대주택 또는 기존주택 매입임대주택에

입주할 수 있도록 임대 보증금을 무이자로 지원하여 주거생활 안정 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2011 ~ 2014(4년간)

○ 사 업 량 : 400호(매년 100호)

※ 2012년 사업량 : 50호(영구․기존주택매입 임대 40, 국민임대 10)

○ 총사업비 : 2,000백만원(도비 40%, 시비 60%)

※ 2012년 예산 : 334백만원(도비 134, 시비 200)

○ 지원대상 : 무주택 기초생활수급자중 장기임대주택 또는 기존주택

매입임대주택의 신규 입주자

○ 지원기간 : 1회 2년 단위, 2회 연장 가능

○ 지원형태 : 무이자 지원

○ 지원근거 : 전라북도 저소득계층 임대보증금 지원 조례

□ 추진상황

○ 2011년 추진실적 : 140가구 498백만원(도비 199, 시비 299)

- 영구임대 23, 국민임대 10, 50년임대 2, 기존주택매입임대 105

□ 금후계획

○ 임대보증금 지원 공고 및 홍보 ---------------- 2012.  2월초

○ 지원대상자 접수 및 선정 통보 ---------------- 2012.  2. 20~

○ 임대보증금 지원 및 입주  -------------------- 2012.  2. 27~

노후 공동주택관리비용 지원

○ 주거환경이 열악하고 자체관리 능력이 부족한 노후공동주택 시설     보수비 일부를 지원, 주거환경 개선 및 서민 주거안정 도모

□ 사업개요

○ 현    황 : 492개단지 144,209세대(‘12. 1월말 기준)

○ 사업대상 : 334개단지 73,690세대(15년 이상 경과 공동주택)

	‘05~’11년 : 203단지 30,072세대, 1,960백만원
	‘12년 이후 : 131단지 43,618세대

○ 사 업 비 : 200백만원

○ 사업내용 : 노후시설물 보수비의 70%이하로서 1,000만원이하 보조

□ 추진상황

○ 노후공동주택관리비용지원 주택조례 제정 ----- 2005.  6. 24.

○ 15년 이상 경과된 공동주택지원으로 확대 개정  - 2007. 10. 15.

○ 음식물쓰레기 감량 우수단지 가점 부여   ------- 2009. 10.  9.

○ 지원실적

- ‘05년 198, ‘06년 286, ‘07년 294, ‘08년 488, ‘09년 294, ‘10년 200, ‘11년 197백만원

○ ’12년 지원대상 단지 안내문 발송 및 신청접수 - 2012.  1.  2 ~  1. 20.

□ 금후계획

○ 2012년 지원대상 단지 선정 및 확정 ----------- 2012.  2월말

- 구청 사전심사 및 심사위원회 실태조사를 거쳐 지원대상 단지 선정 심사

○ 사업준공 및 정산  --------------------------- 2012. 10월말

빈집 리모델링을 통한 “희망의 집” 추진

○ 빈집 리모델링을 통하여 주택이 없어서 어려움을 겪는 모자가정

독거노인, 미혼모 등의 가정에 무상 임대하는 “희망의 집” 사업

추진을 통하여 사회취약계층의 주거안정에 기여

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2011. 12.  1 ~ 2012. 12. 31.

○ 추진대상 : 년 2가구 정도

○ 추진내용

- 빈집 소유자의 무료임대(5년이상) 주택을 리모델링하여 사회취약        계층에게 무상으로 거주토록 함

- 전주시 주거복지센터와 건설업체가 협력하여 리모델링 추진

□ 추진계획

○ 리모델링 대상 주택 선정

- 전주시 홈페이지 및 동 주민센터와 협조하여 빈집 소유자의 무상         임대주택 선정

○ 리모델링 후 입주민 선정 : 생활복지과와 협의하여 추진

□ 소요예산 및 재원대책

○ 전주시 주거복지지원센터에 후원하는 단체, 자체모금액 및 건설업체

지원으로 추진

○ 구청에서 추진하는 사랑의 집 고쳐주기사업 대상자에 포함 추진

□ 기대효과

○ 전주시 주거지원복지센터

- 2011년부터 민간단체 후원 및 자체 모금으로 빈집 소유자로부터

무상 임대하여 리모델링 후 취약계층 주거지원을 추진중이며,

지자체와 협력하여 수혜자 확대

○ 전주지역 공동주택추진중인 건설업체 참여로 사회환원과 기업이미지 제고

농촌 주거환경개선사업

○ 도시지역에 비해 상대적으로 소외받고 있는 농촌마을의 열악한 환경을

개선하여 살기좋은 농촌을 건설하고 도․농간 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 사업대상 : 12개동 181개 농촌자연마을

○ 총사업비 : 17,000백만원(기투자 13,400백만원)

- 2012년 예산 : 1,200백만원(광특 600, 시비 600)

○ 사업기간 : 2005 ~ 2014(10개년)

○ 사업내용 : 마을도로 정비, 하수도 정비, 마을공동시설 등 농촌마을 환경개선

□ 추진상황

○ 농촌지역개발계획 용역 완료 ---------------------- 2005.  2.

- 2009년 이전 추진 : 221건 완공, 11,000백만원 집행

○ 국토부 도시활력증진지역개발사업 선정 ------------ 2009.  6.

○ 투융자 재심사 완료(재원변경) ------------------- 2010.  6.

- 예산 재원변경【지방비 ⇨ 광역지역발전특별회계(국토부)예산】

○ 2011년 추진 : 8개 마을 24건 1,200백만원(완산 480, 덕진 720)

□ 금후계획

○ 주민의견 수렴 및 사업대상지 선정  --------------- 2012.  2.

○ 설계용역 및 공사추진 ---------------------- 2012.  3 ～  9.

농촌마을 빈집ㆍ슬레이트 정비 및 주택개량사업

○ 낡고 불량한 농촌주택의 개량을 촉진하는 등 농촌 주거환경 개선을 통해

농촌지역의 주거문화 향상 및 주거복지를 실현하고 농촌 정주의욕 고취

□ 사업개요

≪ 농촌 빈집정비사업 ≫

○ 사업대상 : 농촌마을 빈집 2개동 및 슬레이트 정비 8개동

○ 사 업 비 : 20백만원

○ 지원금액 : 빈집정비 2백만원/동, 슬레이트 정비 2백만원/동

≪ 농촌 주택개량사업 ≫

○ 사업대상 : 농촌지역 노후․불량주택을 개량하고자 하는 주민

○ 사 업 비 : 550백만원(국비 특별지원 100, 농협 360, 도 27, 시 63)

(농협 80%, 도 6%, 시 14%)

○ 지원금액 : 11개동(세대당 50백만원 이내)

□ 추진상황

≪ 농촌 빈집정비사업 ≫

○ 2008 ～ 2011년 지원 : 45개동 45백만원

≪ 농촌 주택개량사업 ≫

○ 2010년도 지원 : 21개동 1,050백만원

○ 2011년도 지원 : 14개동 675백만원

□ 금후계획

○ 2012년 사업홍보, 신청 및 구청심사 -------------- 2012. 2～

○ 대상사업자 선정 --------------------------------- 2012.  3.

○ 사업준공 및 정산 등 ----------------------------- 2012. 12.

사회취약계층 주택개ㆍ보수 사업

○ 저소득 취약계층의 삶의 질 향상을 위하여 자가주택을 보수하여

주거환경 개선을 통해 주거문화 향상 및 주거복지 실현

□ 사업개요

○ 사업대상 : 기초생활수급자중 자가주택 150동

○ 사 업 비 : 900백만원(국비 720, 시비 180)(국비 80%, 시비 20%)

○ 지원금액 : 동당 6백만원이내

□ 추진상황

○ 2011년 : 160개동 사업추진 완료

○ 주요 보수내용

- 지붕, 보일러, 출입문, 창문 등 현장 방문하여 본인이 원하는

수리내용을 최대한 수용하여 보수

○ 국토해양부에서 80% 예산을 지원하고, LH공사에서 시공자를

선정하여 추진하는 사업임.

□ 금후계획

○ 2012년 사업대상자 선정  ------------------ 2012.  2 ~

○ LH공사와 상호 협약체결 ------------------ 2012.  3.

○ 주택개․보수 추진 ------------------------- 2012.  3 ～ 10.

○ 사업 준공 및 정산 등 ---------------------- 2012. 11.

아중도서관 신축공사

○ 우리시 동․남부지역은 인근 아파트 밀집지역으로 청소년과 중․장년층이

많이 거주하고 있어 문화와 정보를 접할 수 있는 도서관 건립에

대한 요구와 기대에 부응하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 인후동 1가(구총목어린이공원옆)

○ 건축규모 : 연면적 2,793㎡(지하 1층/ 지상 3층)

○ 사업기간 : 2011.  6 ~ 2012.  8.(14개월)

○ 사 업 비 : 5,590백만원(국비 2,236, 시비 3,354)

○ 설 계 자 : 미듦건축사무소 대표 최만규

○ 시 공 사 : (유)에스에이치건설 대표 조현중

○ 감 리 자 : 율그룹건축사무소 대표 강문수(건축)

□ 추진상황

○ 투융자 심사(전라북도) ----------------------- 2010.  8. 25.

○ 발주의뢰 및 개찰(적격심사)  ----------------- 2011.  6.  2.

○ 건축협의 완료(덕진구청)  -------------------- 2011.  6. 14.

○ 착    공  ------------------------------------ 2011.  6. 22.

○ 지하1～3층 골조공사 완료  ------------------- 2011. 12. 23.

□ 금후계획

○ 내부 및 외부공사 완료 ----------------------- 2012.  2 ～  8.

○ 준    공 ------------------------------------ 2012.  8.

도시 주거환경개선사업

○ 주거환경이 불량한 지역을 계획적으로 정비하여 도시환경을 개선하고

주거생활의 질 향상에 이바지

□ 사업개요

○ 대    상 : 16개 구역(98.5ha)

○ 총사업비 : 86,679백만원(기투자 47,379, 2012년 예산 22,472)

○ 사업기간 : 2006  ～  2013(8개년)

○ 사업내용 : 도로 88개 노선(14,355m), 주차장 22개소(12,008㎡),

공원 20개소(14,373㎡), 녹지 1개소(593㎡) 등

□ 추진상황

○ 정비구역 지정 및 정비계획 결정 고시(14개 구역) - 2008.  6  ~  11.

○ 구역별 보상 및 우선순위에 따른 공사 추진 - 2008.  6  ~

- 공 사 완 료 : 도로개설 10개 노선 L=1,315m(원각사 외 5개 구역)

- 용지보상 추진 : 여의구역 외 11개 구역

- 공사 추진중 : 간납대 외 5개 구역

ㆍ도로 21개 노선(3,697m), 주차장 8개소(3,113㎡), 공원 9개소(4,198㎡)

○ 거점확산형 시범사업(동산구역) 정비계획 수립 고시 - 2010.  3. 18.

○ 종광대1구역 정비구역 지정 및 정비계획 수립 -- 2011. 11. 24.

□ 문제점 및 대책

○ 거점확산형 시범사업(동산구역) 내 거점개발(공동주택) LH공사 참여 여부 미정

⇨ 사업지연으로 인한 주민불편 해소를 위해 정비기반시설 우선 추진

□ 금후계획

○ 정비기반시설에 대한 용지보상 및 공사 등 사업 지속추진 - 2012.  2~

○ 주민 요구사항 등 파악 검토․반영, 예산배정 조정 - 2012.  3~

주택재개발ㆍ재건축사업 추진

○ 주거환경이 불량하고 노후된 건축물을 개량․정비함으로써 도시환경을

개선하고 시민의 주거생활의 질을 높이고자 함

□ 사업개요

○ 정비예정구역 : 44개소(재개발 25, 재건축 10, 사업유형 유보 8, 도시환경 1)

□ 추진상황

○ 추진위원회 구성 : 24개구역(재개발 17, 재건축 6, 도시환경 1)

○ 사업추진 : 24개구역

계	추진위 운 영	정비구역 신청진행	정비구역지 정	조합인가신청진행	조합인가	사업시행 인 가	착 공
24	7	1	4	1	9	1	1

○ 예정구역 해제동의여부 주민설명회 - 2011.  4 ~  5, 9 ~ 10.

○ 추진위원회 및 조합 실태조사 및 지도점검 ---- 2011.  7 ～  8.

○ 추진위원장, 조합장, 임원 및 주민교육 -------- 2011. 11. 25.

○ 예정구역 해제여부 동의서 징구 ------ 2011. 10 ~ 2012.  2.

□ 문제점 및 대책

○ 국토계획법 시행령 개정으로 제2종일반주거지역에서 층수제한 폐지로       기본계획 변경 요구 민원

⇨ ’12년 본 예산 미반영으로 판상형 층수제한 완화 내용을 우선 용역비

없이 자체변경 추진하고 전반적인 변경은 예산 확보 후 추진

□ 금후계획

○ 정비구역지정 및 사업시행인가 신청구역 행정절차기간 최소화

○ 분쟁조정위원회 운영 고질, 반복, 주요쟁점 민원사항 최소화

○ 2020년 목표 기본계획 수립시 예정구역 해제여부 결과 반영

도로안전과 소관

	남부순환도로 개설	----	35
	우전로 확장	----	36
	한옥마을 문화적 경관조성(전주천 동로 확장)	----	37
	쑥고갯길 확장	----	38
	북전주IC 진입로 확장	----	39
	호남제일문~동산고가교 도로확장	----	40
	동부대로 보행환경 조성	----	41
	도로안내표지판 정비사업	----	42
	지방도 712호선 위험도로 구조개선	----	43
	교통사고 잦은 곳 개선 및 회전교차로 설치	----	44
	외곽지역 가로등 설치 및 지하차도 조도개선	----	45
	북부권 국도대체우회도로 건설(용정~용진)	----	46
	새만금~전주~대구~포항간 고속도로 건설	----	47

남부순환도로 개설

○ 서남권 지역의 교통량을 외곽으로 분산시켜 도심교통난 해소

○ 외곽 도로망 구축으로 주변의 발전 및 교통편의 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 서서학동 공수교 ～ 동서학동 좁은목

○ 규    모 : 도로개설 연장 1,560m, 폭 25～35m

○ 사 업 비 : 45,093백만원(보상 25,600, 공사 19,493)

- 기   투   자 : 44,093백만원

- 2012년 예산 : 500백만원

○ 사업기간 : 1998 ～ 2012(15개년)

□ 추진상황(공정 98％)

○ 공수교 ～ 거산황궁@ ～ 무궁화주유소간 도로개통 --- 2006.  5.

○ 무궁화주유소 ～ 좁은목간 도로개통 ------------- 2011.  8.  1.

- 서학광장 ～ 거산황궁@ ～ 좁은목(L=1,873m) 도로개설 완료

□ 금후계획

○ 편입토지 및 지장물 보상 ------------------- 2012.  1 ～  6.

○ 추경(500백만원) 확보하여 공사완료 --------------- 2012. 12.

우 전 로  확 장

○ 서부신시가지 ~ 전주공단 간 연결도로 교통 병목현상 해소

○ 황방산 공원을 이용하는 시민의 안전한 보행권 확보

□ 사업개요

○ 위    치 : 서곡광장 ～ 서부신시가지 경계(서곡주공아파트 뒤)

○ 규    모 : 도로개설 연장 1,200m, 폭 20 ⇨ 35m

○ 사 업 비 : 10,500백만원(보상 3,000, 공사 7,500)

- 기   투   자 : 10,000백만원

- 2012년 예산 : 500백만원

○ 사업기간 : 2007 ～ 2012(6개년)

□ 추진상황(공정 80％)

○ 서곡광장 가각정리(서곡광장 ~ 썬플라워 웨딩홀) 개통 --- 2008.  4.

○ LG 및 대림아파트 방음시설(방음림 및 방음벽) 시공 - 2010. 11 ～ 12.

○ 썬플라워웨딩홀 ~ 솔병원 앞 입구 노상 토공작업 --- 2011.  1 ～  3.

○ 전체구간 구조물 시공 및 상․하수관 부설 완료 --- 2011.  3 ～  7.

○ 기층포장 완료(임시개통) ------------------------- 2011. 12.

□ 금후계획

○ 공사완료 ---------------------------------------- 2012.  6.

한옥마을 문화적 경관조성(전주천 동로 확장)

○ 주변 자연경관을 활용하여 남부시장, 한옥마을 연계 슬로시티 환경 조성

○ 전통문화 도시의 특성을 살려 한옥마을과 전주천이 어우러지는

테마특화거리 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 싸전다리 ～ 남천교 ∼ 한벽당간

○ 사업규모 : 연장 930m, 폭 6~8 ⇨ 12m

○ 총사업비 : 15,400백만원(보상 3,800, 공사 11,600)

- 기   투   자 : 2,300백만원

- 2012년 예산 : 4,600백만원(균특 2,300, 시비 2,300)

○ 사업기간 : 2012 ～ 2014(3개년)

□ 추진상황

○ 싸전다리 ～ 남천교간 지장물 철거 ---------------- 2009. 12.

○ 용역과제 심의완료 --------------------------- 2011. 11. 14.

□ 금후계획

○ 기본 및 실시설계용역 ------------------------ 2012.  2 ～  8.

○ 편입용지 보상 및 공사추진 ---------- 2012.  2 ～ 2014. 12.

쑥 고 갯 길  확 장

○ 서남부 시가지의 주진입도로 병목구간 해소

○ 대규모 주택지 개발로 인한 교통량의 탄력적 대응

□ 사업개요

○ 구    간 : 효자동 안행교사거리 ～ 효자광장

○ 사 업 량 : 연장 570m, 폭 25 ⇨ 35m

○ 사 업 비 : 12,000백만원(보상 7,000, 공사 5,000)

- 기   투   자 : 3,600백만원

- 2012년 예산 : 2,800백만원

○ 사업기간 : 2006 ～ 2014(9개년)

□ 추진상황

○ 실시설계 완료 ----------------------------------- 2008.  2.

○ 편입토지 59필지중 18필지 보상완료(30%) ------- 2009. 12.

□ 금후계획

○ 편입토지 및 지장물(41건 중 37건) 보상추진 --- 2012.  1 ～ 10.

북전주IC 진입로 확장

○ 북부권지역 교통소통 원활 및 개발촉진 기여

○ 지역 주민의 안전한 보행권 확보

□ 사업개요

○ 위    치 : 전미동 미산초교 ～ 만경강(하리교 남단)

○ 사업규모 : 연장 1,200m, 폭 5.5 ⇨ 25m

○ 총사업비 : 9,100백만원(보상 2,100, 공사 7,000)

- 기   투   자 : 5,800백만원

- 2012년 예산 : 1,000백만원

○ 사업기간 : 2010 ～ 2013(4개년)

□ 추진상황(공정 10％)

○ 도시계획사업 실시계획인가 ------------------- 2009.  4.  7.

○ 공사착공 ------------------------------------ 2011.  6. 29.

○ 편입토지 보상(134필지 23,666㎡중 123필지 22,888㎡완료) - 2011. 12.

□ 금후계획

○ 편입토지 보상 완료 ------------------------------ 2012.  6.

○ 토공, 인도포장, 기층 및 중간층 포설 ---------- 2012.  1 ～ 12.

○ 전기 및 가로수 등 사업완료 ---------------------- 2013. 12.

호남제일문~동산고가교 도로확장

○ 시내를 통과하는 국도 1, 27호선 확장으로 교통체증 해소

○ 조촌․동산동 주간선도로의 쾌적한 보행환경 조성

□ 사업개요

○ 구    간 : 호남제일문사거리 ～ 동산고가교

○ 사 업 량 : 연장 1,000m, 폭 18.5 ⇨ 35m

○ 사 업 비 : 13,000백만원(보상 5,000, 공사 8,000)

- 기   투   자 : 1,000백만원

- 2012년 예산 : 1,000백만원

○ 사업기간 : 2008 ～ 2014(7개년)

□ 추진상황

○ 실시설계 용역완료 ------------------------------- 2009.  7.

○ 편입토지 88필지중 13필지 보상완료 -------------- 2009. 12.

□ 금후계획

○ 편입토지 및 지장물 보상 추진 ----------------- 2012.  1 ～  6.

동부대로 보행환경 조성

○ 주변 개발로 보행자가 증가함에 따라 도로확장 및 인도를 개설하여

보행자 교통사고 발생예방 및 주민불편사항 해소

□ 사업개요

○ 구    간 : 전미로 ～ 차량등록사업소

○ 사 업 량 : 연장 3,000m, 폭 18.5 ⇨ 35m

○ 사 업 비 : 15,000백만원(보상 4,000, 공사 11,000)

- 기   투   자 : 9,800백만원(국비 4,000, 시비 5,800)

- 2012년 예산 : 미확보

○ 사업기간 : 2009 ～ 2013(5개년)

□ 추진상황(공정 57％)

○ 전미로 ～ 기린육교(L=1,500m) 도로 확․포장 완료 --- 2010. 12.

○ 기린육교 ～ 대송장례식장간 도로확장(L=500m) 착수 --- 2011.  8.

□ 쟁점사항 및 대책

○ 대송장례식장 ～ 차량등록사업소간 용지매입 및 공사비 추경반영

□ 금후계획

○ 기린육교 ~ 대송장례식장간 도로확장(L=500m) 완료 - 2012.  4.

○ 공사완료 --------------------------------------- 2013. 12.

도로안내표지판 정비사업

○ 도로이용자의 혼란을 방지하기 위해 2009. 10월 전면 변경된 새주소

도로명으로 도로안내표지판의 도로명 수정

○ 도로망 확장 및 관공서 이전에 따라 기존표지판 문안 정비

□ 사업개요

○ 구    간 : 전주시 관내 도로안내표지판

○ 표지판 수량 : 1,100개소

- 관공서 및 주요기관 이전, 민원사항 발생에 따른 표지판 유지관리

○ 사업내용 : 문자수정, 판 교체, 신설 및 지주도색 등

○ 총사업비 : 1,500백만원

- 기   투   자 : 700백만원

- 2012년 예산 : 100백만원

○ 사업기간 : 2010 ～ 2016(7개년)

※ 신속한 민원처리를 위하여 년중 단가계약으로 추진

□ 추진상황

○ 도로표지판 도로명 수정 등 : 640개소

- 2010년 정비 : 120개소 200백만원(기린대로, 팔달로, 백제대로)

- 2011년 정비 : 520개소 500백만원

(동부대로, 온고을, 춘향, 가련산, 혁신, 천잠, 홍산, 세내로 및 이면도로)

□ 금후계획

○ 실시설계 ---------------------------------------- 2012.  2.

○ 발주 및 완료 ------------------------------ 2012.  3 ～ 12.

지방도 712호선 위험도로 구조개선사업

○ 불합리한 위험도로 구조를 교통사고 방지를 위해 구간특성에 맞게

안전하게 개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 지방도 712호선(삼천3동 ~ 김제시 금산면) - 금산사선

○ 사업규모 : 연장 3.0km(전주시 1.5km, 김제시 1.5km), 폭 8.5m

○ 총사업비 : 8,100백만원(전주시 4,300, 도로관리사업소 3,800)

- 기   투   자 : 188백만원(국비 94, 시비 94)

- 2012년 예산 : 600백만원(국비 300, 시비 300)

○ 사업기간 : 2011 ～ 2013(3개년)

□ 추진상황

○ 712호선 위험도로 개선사업에 포함 --------------- 2010. 10.

○ 관계기관 협의(도, 김제시 등) -------------- 2011.  4 ～ 10.

○ 사업추진방향 확정(급커브구간 완화차로 설치) --- 2011. 10. 13.

○ 지방도 712호선 위험도로개선 용역착수(도 도로관리사업소) - 2011. 12.

□ 금후계획

○ 실시설계 용역 완료 ------------------------------ 2012.  3.

○ 공사발주 및 완료 ------------------- 2012.  5 ～ 2013. 12.

교통사고 잦은곳 개선 및 회전교차로 설치

○ 교통 위험도로에 대하여 교통섬, 차로정비, 선형조정 등 교통사고

예방시설을 설치하여 안전한 도로환경 조성

□ 사업개요

○ 위    치

- 교통사고 잦은곳 : 송천중앙로

- 회전교차로 : 원당교차로(평화동)

○ 사업규모 : 교차로 구조개선 및 회전교차로 설치

○ 총사업비 : 290백만원(교통사고 잦은곳 90, 회전교차로 200) - 국비ㆍ시비 50%

○ 사업기간 : 2012.  2 ～ 10.

※ 매년 도로교통공단에서 사업지 선정, 국비지원사업으로 추진

□ 추진상황

○ 진북터널사거리, 서신동 사거리 교차로 구조개선 완료 - 2011.  4 ～  7.

○ 인후6거리 회전교차로 설치 완료 -------------- 2011.  9 ～ 11.

□ 금후계획

○ 송천중앙로 개선

- 실시설계 --------------------------------------- 2012.  2.

- 공사 발주 및 완료 ------------------------ 2012.  3 ～  7.

○ 원당교차로 회전교차로 설치

- 관련기관(경찰서, 도로공단) 협의 및 실시설계 - 2012.  2 ～  5.

- 공사 발주 및 완료 ------------------------ 2012.  6 ～ 10.

외곽지역 가로등 설치 및 지하차도 조도개선

○ 조도가 낮은 시 외곽지역과 지하차도 내부 교통사고 예방을 위하여

도로 조명시설의 조도를 밝게 개선하여 교통사고 예방 및 야간통행

주민불편 해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 관내 외곽 및 교통사고 다발지역

○ 사업규모 : 가로등 설치 50등, 지하차도․터널 조도개선 250등

○ 사업기간 : 2012.  2 ～ 12.

○ 사 업 비 : 150백만원(가로등 100, 지하차도․터널 50)

※ 신속한 민원처리를 위하여 년중 단가계약으로 추진

□ 추진상황

○ 2011년 가로등 설치(50등) - 외곽지역(송천, 덕진, 효자, 동산동)

○ 2011년 지하차도 조도개선(500등) - 월드컵, 송천, 안덕원

□ 금후계획

○ 가로등 설치(평화, 삼천, 동산, 팔복동 50등) - 2012.  2 ～ 12.

○ 조도개선(안덕원, 진북터널 250등) --------- 2012.  2 ～ 12.

북부권 국도대체우회도로 건설(용정~용진)

○ 시가지 통과 국도 17,26,27호선 교통량 분산으로 시내권 교통정체 해소

○ 북동부지역 지역개발 촉진 및 광역도시 발전기반 구축

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 용정동 ～ 완주군 용진면 용호리(국도26호선)

○ 규    모 : 연장 11.23㎞, 폭 20.0m(전주시 8.4㎞)

편입용지(전주시 570필지 465,811㎡)

○ 사 업 비 : 2,683억원(국비 2,455, 시비 228) - 시비는 편입용지 보상

- 기   투   자 : 1,649억원(국비 1,471, 시비 178)

- 2012년 예산 :   258억원(국비 238, 시비 20)

○ 사업기간 : 2005 ～ 2013(8개년)

○ 시행기관 : 국토해양부(익산지방국토관리청)

□ 추진상황

○ 실시설계 완료 ---------------------- 2003.  7 ～ 2005. 12.

○ 공사착공 ---------------------------------------- 2006.  6.

○ 편입토지 매입 411필지 394,529㎡(85%) - 2008.  4 ～ 2011. 12.

□ 금후계획

○ 잔여필지 159필지 71,282㎡중 80필지 29,861㎡ 보상추진 - 2012.  1 ～ 10.

새만금~전주~대구~포항간 고속도로 건설

○ 새만금에서 포항까지 동서축을 잇는 고속형 직통도로 건설

○ 동서간 교통체계를 개선하고 동서지역의 통합적 발전에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 새만금 ～ 김제 ～ 전주 ～ 대구 ～ 포항

○ 사업규모 : 총연장 181㎞(새만금 ～ 전주 54.3㎞)

○ 사업기간 : 49,000억원(새만금 ～ 전주 16,458억원)

○ 총사업비 : 2010 ～ 2020(11개년)

- 기   투   자 : 17억원

- 2012년 예산 : 22억원

○ 소    관 : 국토해양부(한국도로공사)

□ 추진상황

○ 17대 대통령 공약사업 선정(새만금～포항) ---- 2007. 12. 17.

○ ’09하반기 예비타당성조사 대상사업 선정(기재부) - 2009. 11.  5.

○ 예비타당성조사 착수(기재부⇨KDI) ---------- 2010.  2.  1.

※ 예비타당성 용역 수행기관 : KDI/조사기간(‘10. 2. 1～ 8.31)

○ 타당성조사(17억원) 용역추진(국토해양부) - 2010. 12 ～ 2012.  3.

- 새만금 ~ 전주구간(L= 54.3㎞) 우선시행

○ 노선선정 의견 제출 ------------------------- 2011.  7.  7.

○ 환경성 초안 주민설명회 개최 -------------------- 2011. 11.

□ 금후계획

○ 타당성 조사(국토해양부) ------------------------- 2012.  3.

○ 기본 및 실시설계 용역(한국도로공사) -- 2012.  4 ～ 2014. 12.

- 주민설명회(환경영향평가, 노선선정, 실시설계) 3회 개최 예정

○ 공사추진 ---------------------------------- 2015 ～ 2020.

생태복원과 소관

ꊱ	노송천복원 프로젝트	----	49
ꊲ	전주천 고향의 강 정비사업	----	50
ꊳ	삼천 생태하천 복원사업	----	51
ꊴ	덕적천 재해예방사업	----	52
ꊵ	산성천 하천환경정비사업	----	53
ꊶ	중복천 개수사업	----	54
ꊷ	편안한 하천산책로 정비사업	----	55
ꊸ	삼천 하천기본계획수립 용역	----	56
ꊹ	빗물이용시설 설치 지원사업	----	57
	노송천 공영주차장 조성사업	----	58

노송천 복원 프로젝트

○ 복개하천을 생태하천으로 복원하여 자연과 어우러진 수변공간 제공

○ 하천과 연계한 거리를 조성하여 구도심 활성화 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 중앙시장 ∼ 한국은행 ∼ 팔달로 북문교 ∼ 전주천 합류점

○ 사업규모 : 생태하천복원 L= 1,124m

○ 총사업비 : 32,700백만원(국비 22,890, 시비 9,810)

- 기 투 자 : 19,739백만원(국비 10,763, 시비 8,976)

- 2012년 :  2,815백만원(국비 2,415, 시비 400)

- 2012년 이후 : 10,146백만원(국비 9,712, 시비 434)

※ 건산천(환경부 협의) : 5,014백만원(국비 3,510, 시비 1,504)

○ 사업기간 : 2008.  5 ∼ 2013. 12.

□ 추진상황(총공정 70%)

○ 1단계 하천복원 완료 ---------------- 2008.  5 ∼ 2011.  9.

- 중앙성당 ∼ 진북동 한국은행 L= 694m

○ 2단계 사업계획 변경승인(환경부) ----------------- 2011. 11.

(중앙성당 ∼ 노송광장 ⇨ 팔달로 북문교 ∼ 건산천 복개종점 L=430m)

○ 2단계(건산천) 실시설계용역 착수 ----------------- 2012.  1.

□ 금후계획

○ 노송천 복원 프로젝트(2단계) 사업 추진(설계용역 / 공사)

- 실시설계 용역 ---------------------------------- 2012.  8.

- 사업시행 ------------------------ 2012.  9 ～ 2013. 12.

○ 노송천 복원 프로젝트(2단계) 전면책임감리 발주 -- 2012. 10.

전주천 고향의 강 정비사업

○ 고향에 대한 지역적 자긍심 고취, 쾌적하고 편안한 여가 및 생활공간을     제공하여 시민 공동체의식 함양에 기여

○ 지역명물로 지역경제 활성화에 기여하고 다시 찾고싶은 고향으로 기억

할 수 있는 계기 마련

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 동서학동 안적교 ～ 서신동 삼천합류점

○ 사업규모

- 친환경 하천정비 및 생태하천 조성 9.85km

- 친수공간 및 역사․문화․관광 연계시설

- 스토리텔링을 통한 상징조형물 설치 1식 등

○ 사 업 비 : 39,000백만원(국비 23,400, 도비 7,800, 시비 7,800)

- 기 투자 : 4,667백만원(국비 2,800, 도비 600, 시비 1,267)

- 2012년 : 3,000백만원(국비 1,800, 도비 600, 시비 600)

○ 사업기간 : 2010 ～ 2015(6개년)

□ 추진상황

○ 시범사업 선정(국토부) --------------------------- 2010.  4.

○ 기본 및 실시설계용역 착수 ----------------------- 2010.  9.

○ 고향의 강 추진협의회 자문(6회) ---------- 2011.  3 ~ 10.

○ 하천이용시민 설문조사 ----------- 2011.  5. 23 ~  5. 25.

○ 주민설명회(2회) ----------------- 2011.  6. 24 ~  6. 27.

○ 기본계획(안) 추진협의회 확정 --------------- 2011. 10. 25.

○ 기본계획(안) 디자인 협의 ------------------- 2011. 10~12.

○ 의회 도시건설전문위 보고 ------------------- 2011. 12.  9.

○ 기본 및 실시설계 완료 ---------------------- 2011. 12. 30.

□ 금후계획

○ 공사 및 감리용역 1차분 발주 ------------------- 2012.  2.

○ 1차분 공사 및 감리용역 추진 ------------- 2012.  3 ~ 12.

○ 연차별 사업추진 ------------------------- 2013 ～ 2015.

삼천 생태하천 복원사업

○ 기후변화에 따라 갈수록 환경이 악화되고 있는 삼천의 수질개선과

생태계 유지를 위해 생태하천 복원이 시급하고

○ 수생태복원, 생태습지 조성을 통한 하천-산-녹지-공원의 그린벨트를

구축하고 생태건강성 회복으로 새만금 수질개선에 기여코자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 평화2동 원당교 ~ 서신동 전주천합류점

○ 사업규모 : 생태하천복원사업 11.0km(상류 4km 중점추진)

○ 사 업 비 : 28,000백만원(국비 19,600, 시비 8,400)

- 기 투자 :   666백만원(국비 200, 시비 466)

- 2012년 : 1,714백만원(국비 1,200, 시비 514)

○ 사업기간 : 2011 ~ 2014(4개년)

□ 추진상황

○ 자연형하천조성사업 완료(1단계/하류 7㎞) ---- 2001 ~ 2007.

○ ‘11년 신규 생태하천복원사업 신청(2단계/상류 4㎞) - 2010.  4.

○ 중기지방재정계획 반영 --------------------------- 2010. 12.

○ 기본 및 실시설계용역 행정절차(계약심의, 원가심사) 이행 - 2011.  6.

○ 기본 및 실시설계용역 착수 ------------------ 2011. 10 ~

□ 금후계획

○ 전문가(환경단체 등) 및 시민 의견수렴 ----- 2012.  1 ～  5.

○ 사전환경성검토 협의, 실시설계 완료 -------------- 2012.  8.

○ 공사발주 및 연차별 사업추진 -------- 2012.  9 ～ 2014. 12.

덕적천 재해예방사업

○ 삼천의 지류인 덕적천 상류 도시화로 우수 도달시간의 빨라짐과 홍수

단면의 부족으로

○ 하천범람에 따른 상습침수로부터 주택 및 농경지 피해를 예방하여

주민의 생명과 재산을 보호하고 시민생활 편익증진

□ 사업개요

○ 구    간 : 평화동 동아현대아파트 ∼ 삼천 합류지점

○ 규    모 : 연장 1,562m, 폭 16～23m, 교량가설 6개소

○ 사 업 비 : 11,000백만원(국비 6,600, 도비 2,200, 시비 2,200)

- 기 투 자 : 5,000백만원(국비 3,000, 도비 1,000, 시비 1,000)

- 2012년 : 4,000백만원(국비 2,400, 도비 ,800, 시비 ,800)

○ 사업기간 : 2010 ∼ 2013(4개년)

□ 추진상황

○ 덕적천 재해위험지구 지정 및 관리(도로안전과) ---- 2010.  4.

○ 실시설계(334백만원) ---------------------------- 2011.  1.

○ 공사계약 및 1차분 착공 -------------------------- 2011.  2.

○ 소방방재청 설계 심의 ---------------------------- 2011.  5.

○ 하천기본계획(변경) 고시(전라북도) --------------- 2011.  8.

○ 도시계획시설(하천,도로) 결정(변경) 도시계획위원회 개최 - 2011. 12.

※ 1차분 공사내역 : 교량 2개소, 자연석쌓기 4,174㎡

□ 금후계획

○ 하천기본계획(변경) 및 도시계획시설결정에 따른 설계변경 - 2012.  2.

○ 2차분 공사 계약 및 착수 ------------------------- 2012.  2.

○ 2차분 공사 완공 --------------------------------- 2012. 12.

○ 전체분 사업마무리 ------------------------------- 2013. 12.

산성천 하천환경정비사업

○ 수해상습지 개선사업을 통하여 재해로부터 인명 및 재산피해를 예방

하고 생태하천으로 조성하여 시민 휴식공간 제공

○ 수생태 회복과 수질개선은 물론 도시 온도 저감으로 쾌적한 녹색생활

공간 제공 및 새만금 수질개선 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 동서학동 삼경사 부근 ～ 전주천 합류점

○ 사업규모

- 수해상습지 개선 및 친환경하천정비 2.3km

- 하천정비(확장) 5~6 ⇨ 12m

○ 사 업 비 : 12,350백만원(국비 7,410, 도비 2,470, 시비 2,470)

- 기 투자 : 1,000백만원(국비 600, 도비 200, 시비 200)

- 2012년 : 1,000백만원(국비 600, 도비 200, 시비 200)

○ 사업기간 : 2011 ～ 2014(4개년)

□ 추진상황

○ 하천정비 기본계획 수립 -------------------------- 2007.  4.

○ 지방하천 환경정비사업 선정(국토해양부) ---------- 2011.  2.

○ 용역과제 심의(적정) ----------------------------- 2011.  5.

○ 기본 및 실시설계용역 행정절차(계약심의, 원가심사) 이행 - 2011.  6.

○ 기본 및 실시설계용역 착수 ----------------------- 2011. 10.

□ 금후계획

○ 전문가(환경단체 등) 및 시민 의견수렴 ----- 2012.  1 ～  3.

○ 사전환경성검토 협의, 실시설계 완료 -------------- 2012.  4.

○ 토지 및 지장물 보상 --------------------------- 2012.  1~

○ 공사 발주 및 연차별 사업추진 ------- 2012.  5 ～ 2014. 12.

중 복 천  개 수 사 업

○ 익산지방국토관리청 소관 만경강 수계치수 위ㆍ수탁사업

○ 재해예방과 친환경생태하천 조성으로 편안한 시민생활공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 삼천동 쑥고개길 ~ 효자동 삼천 합류점

○ 사업규모 : 용지매입 및 하천개수 L=3.5㎞

- 보  상 : 토지 650필지 82,542㎡, 지장물 116건

- 호안 및 축제 5.7㎞, 교량 9개소, 인도교 2개소, 보 3개소, 배수문 8개소 등

○ 사 업 비 : 29,721백만원

- 기 투자 : 24,622백만원(공사 12,117, 감리 1,256, 보상 11,249)

- 2012년 :  5,099백만원(공사 3,679, 감리 256, 보상 1,164)

○ 사업기간 : 2004 ~ 2012(9개년)

□ 추진상황(전체공정 74%)

○ 위․수탁공사 협약체결(익산청 ⇔ 전주시) --------- 2003.  6.

○ 하천기본계획 변경(효자2교 민원해소) - 2008.  5 ~ 2009.  4.

- 익산청 및 전북도 협의, 주민설명회, 심의 및 고시

○ 1 ~ 6차분 보상 및 공사 완료 ------- 2005. 10 ~ 2011. 12.

- 보상 : 토지 583필지 76,050㎡, 지장물 112건

- 공사 : 호안 및 축제 5.0㎞, 제방포장 2.9㎞, 교량 7, 보 3, 배수문 5개소 등

□ 금후계획

○ 7차분 공사계약 및 착수 -------------------------- 2012.  2.

○ 보상추진(토지 67필지 6,492㎡, 지장물 4건) - 2012.  2 ~  6.

○ 7차분 공사추진 ---------------------------- 2012.  2 ~ 12.

※ 전체공사 마무리 추진

편안한 하천산책로 정비사업

○ 산책로 보수, 정비 등 유지관리와 계단, 징검다리, 안내판 설치 등으로

시민 모두가 보다 편안하고 안전한 산책환경에서 활동 기대

○ 시민들의 여가 및 생활공간으로 정착하고 있는 도심하천내 균형있는

운동 및 편의시설 배치로 시민들의 편안한 여가공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주천, 삼천, 아중천 등

○ 사업내용

- 산책로 보수ㆍ보강 22.2㎞(아중천 중점 추진)

- 징검다리 정비 : 3개소

- 운동기구 설치 및 편의시설 개선

○ 사 업 비 : 400백만원(시비)

○ 사업기간 : 2012.  2 ~ 12.

□ 추진상황

○ 하천 산책로 이용시민 불편사항 일제조사 ---------- 2011.  2.

○ 하천 산책로 및 편의시설 등 정비 ----------------- 2011. 3~

- 하천 산책로 진･출입로 정비 15개소, 쉼터조성 1개소

- 운동기구 정비 10개소, 거리표지판 정비 80개소, 안전휀스 설치 157m

- 삼천 이수보일원 산책로 신설 80m

- 삼천 삼천교 일원 산책로 신설 L=440m, B=3.0m

- 수달보호 안전시설 설치 128m

- 징검다리 설치 1개소, 산책로 요철 정비 1.8㎞

□ 금후계획

○ 정비물량 일제조사 ------------------------------- 2012.  2.

○ 실시설계 ---------------------------------------- 2012.  3.

○ 공사착수 및 추진 ------------------------- 2012.  3 ∼ 12.

※ 대대적인 산책로 정비는 공약사업으로 추진

- 전주천 ⇨ 2012 ~ 2013,  - 삼천 ⇨ 2012 ~ 2014

삼천 하천기본계획수립 용역

○ ’85년 기본계획수립 이후 장시간이 흐르고 택지개발 등 도시발전에

따른 유역 여건 변화로 하천관리를 위한 기본계획 재정비가 필요하여

○ 하천법 제25조 규정에 의거 기본계획을 재수립하여 하천에 관한

종합적인 정비, 보전, 이용이 되도록 하는데 있음

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 평화2동 완주군 경계 ～ 전주천 합류점

○ 용역개요

- 하천기본계획수립 및 하천관리대장작성 용역 10.97km

- 하천시설관리대장 작성(제방 및 호안현황)

- 하천현황 관리대장 작성(하천구역, 하천예정지 현황 등)

- 하천시설관리대장 전산화

○ 사 업 비 : 493백만원(도비 150, 시비 343)

※ 2011년 명시이월 사업

○ 사업기간 : 2011. 10 ～ 2012.  8.

□ 추진상황

○ 삼천 하천기본계획수립 변경신청 ----------------- 2010. 12.

※ 하천정비 기본계획 수립(당초) : 1985. 11.

○ ‘11년도 지방하천기본계획수립 대상하천 선정(전북도) - 2011.  3.

○ 용역과제 심의(적정) ---------------------------- 2011.  5.

○ 설계용역 원가심사 완료(전북도) ----------------- 2011.  6.

○ 용역 착수 -------------------------------------- 2011. 10.

□ 금후계획

○ 하천기본계획수립 용역 시행 -------- 2011. 10 ～ 2012.  7.

○ 지방하천 심의위원회 심의 및 고시 --------------- 2012.  8.

빗물이용시설 설치 지원사업

○ 빗물을 재이용함으로써 물부족에 대한 선제적 대응기반을 마련하고

○ 빗물의 효율적 이용으로 수자원 보전과 재해예방 및 환경보전에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내

○ 사업규모 : 빗물이용시설 6개소 정도(설치비 지원)

○ 사 업 비 : 150백만원(시범사업 1개소 100, 일반지원 5개소×10백만원)

○ 사업기간 : 2012.  1 ~ 12.

□ 추진상황

○ 전주시 빗물관리에 관한 조례 ---------------------- 2009. 11.

○ 빗물관리시설의 설치 및 지원지침 제정 ------------- 2010.  2.

○ 대상사업 심사선정(그린스타트 정책협의회) ---- 2010 ～ 2011.

○ 2010 ~ 2011년도 빗물이용시설 설치비 지원 12개소 120백만원 지원

- 공공시설 2개소, 학교 4개소, 공동주택 2개소, 유치원 2개소, 단독 2개소

□ 추진계획

○ 2012년도 시범사업 추진계획 수립 ---------------- 2012.  2.

○ 2012년도 시범사업 및 일반 지원사업계획 공모 ---- 2012.  2.

○ 지원대상 심사선정(그린스타트 정책협의회) -------- 2012.  3.

○ 시설완료 및 설치비 지원 ------------------------- 2012.  6.

□ 홍보 및 권장

○ 기후변화에 따른 물 부족사태에 대비 적극적인 시민운동으로 확산

될 수 있도록 홍보를 강화하여 생활용수를 절약하는 생활습관 권장

노송천 공영주차장 조성사업

○ 노송천 주변상가 및 재래시장 활성화를 위하여 공영주차장 조성으로

탐방객 교통편익 제공

○ 노송천 주변 주차장 조성을 통한 구도심 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 서노송동 655-1번지 외 8필지(구.원불교 서전주교당)

○ 사업규모 : 주차건물 1동 신축(주차면수 130대)

○ 사 업 비 : 5,000백만원(보상 2,300, 공사 2,700)

※ 2012년 예산확보 : 1,200백만원

○ 사업기간 : 2012 ∼ 2014(3개년)

□ 추진상황

○ 노송천 주변 주차장 조성계획 수립 ---------------- 2010. 10.

○ 원불교 서전주교당 대지 및 건물사용(매매)에 대한 협약체결 - 2011.  3.

- 면적 : 7필지 1,571㎡,  건물 : 2동

○ 근린생활시설 및 부속시설 철거완료 ----------------- 2011.  4.

○ 바닥포장 및 임시주차장 활용 ---------------- 2011.  9.  5 ∼

○ 행정절차 이행(공유재산 변경, 투융자심사 등) ----- 2011. 11 ∼ 12.

□ 금후계획

○ 편입부지 등 감정평가 및 협의매수 --- 2011. 12 ∼ 2012.  2.

○ 주차장 조성(실시설계용역 및 공사추진 - 교통과) - 2012.  6 ∼ 2014. 12.

차량등록사업소 소관

ꊱ	시민이 만족하는 친절봉사 행정구현	----	60
ꊲ	건설기계 정기검사 안내서비스 제공	----	61

시민이 만족하는 친절봉사 행정구현

○ 차량등록업무의 전문성 제고로 시민의 기대수준에 부응하여 신뢰받는 행정추진

○ 민원인 편의 도모 및 환경정비로 시민이 만족하는 수요자 중심의 행정구현

□ 사업개요

○ 자동차 및 건설기계등록 현황 : 252,191대

- 자동차등록 : 245,141대

- 건설기계등록 :   7,050대

○ 민원처리건수 : 1,204,705건(1일 평균 : 4,742건)

○ 쾌적한 청사 환경 조성

□ 추진상황

○ ONE-STOP 민원처리로 주민 편의제공

- 자동차등록업무와 관련된 타 기관 사업소내 입주 운영

․지방세 부과․수납(전북은행)․지역개발공채(농협)

○ 민원안내 근무자 배치 : 청경 2명, 자원봉사자 11명

○ 전화민원 상담을 위한 안내도우미 배치 : 1명

□ 추진계획

○ 직원, 자원봉사자, 전화안내도우미 업무연찬 ------------ 매  월

○ 자동차 무상점검 서비스 실시 ------------------------- 분기별

○ 꽃밭조성, 청사주변 잡초제거 등 환경정비 ------------- 수  시

○ 민원인 대기실 및 실내환경 개선 ---------------------- 수  시

건설기계 정기검사 안내서비스 제공

○ 건설기계 정기검사는 등록증에 기재된 검사일을 확인하여 검사

○ 정기검사 안내서비스를 제공하여 검사지연으로 발생되는 과태료 부담을

최소화 하고자 함

□ 현    황

○ 대상건설기계 : 7,050대

○ 정기검사주기 : 1 ～ 3년

- 1년 : 덤프트럭, 콘크리트믹서트럭, 타이어식 굴삭기 등

- 2년 : 로우더, 지게차, 무한궤도식 굴삭기 등

- 3년 : 기타 건설기계

○ 검사과태료 : 최고 30만원

- 검사만료일로부터 30일 이내 : 2만원, 3일 초과시마다 : 1만원

□ 현재실태

○ 1차 건설기계 정기검사 사전안내 : 전북건설기계검사소

○ 2차 건설기계 검사최고 : 유효기간 만료 후 3개월 이내(우리시)

□ 추진계획

○ 1차 대여회사를 통한 건설기계 정기검사 사전안내(월 1회)

○ 2차 건설기계 정기검사 사전안내 : 전북건설기계검사소(기존)

○ 3차 검사최고(사용본거지 및 주소지) : 유효기간 만료 후 1개월 이내

○ 4차 검사최고(사용본거지 및 주소지) : 유효기간 만료 후 3개월 이내

□ 기대효과

○ 영세 건설기계 사업자의 시간적ㆍ경제적 부담 최소화

○ 찾아서 도와주는 적극적 행정 구현