제290회 임 시 회

도시건설 위원회

- 2012년도 제1회 추경 세입‧세출 예산(안) -

주요사업설명서

아트폴리스담당관

Ⅱ 주요 세부사업 설명서

○ 일 반 회 계

	ꊱ 아중저수지주변 산책로 조성사업	---	7
	경관이 아름다운 안골사거리 조성	---	8
	아태무형문화유산전당앞 특색거리 조성	---	9
	친환경 생활공간 조성사업 (도란도란 시나브로길)	---	10

ꊱ 아중저수지주변 산책로 조성사업 ［예산서(안) 218쪽］

(아트폴리스담당관, 한호수, 281-2075)

1. 사업목적 및 필요성

○ 아중저수지에 수상 산책로를 조성하고 주변환경의 개선을 통하여 공간을

이용하는 시민 및 관광객들에게 친환경적 여가활용 공간 제공

2. 사업추진근거

○ 아중저수지내 수상 산책로 조성

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 덕진구 우아동1가 아중저수지내

○ 사업내용 : 수상산책로조성, 테마파크 1, 조형물 2 등

○ 사업규모 : 산책로 조성 L=687m(기 완료 287m)

○ 총사업비 : 6,500백만원

○ 사업기간 : 2009 ~ 2014

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행

○ 기본 및 실시설계 용역 완료                   : 2012. 3

5. 그간 추진사항

○ 수상데크 1차구간 완료(L=287m)               : 2009. 12

○ 2차구간 기본 및 실시설계 완료                : 2012. 3

6. ’12년 1회 추경 예산소요

○ 사 업 량 : 수상산책로 조성 L=100m

○ 소요예산 : 1,000백만원

○ 사    유 : 테마와 스토리가 있는 특색 있는 수상 산책로 조성

7. 연도별 투자계획                                  (단위 : 백만원)

재원별	총사업비	기투자액			‘12년 제1회추경	‘12년 제1회추경 이후	비고
		계	‘11이전	‘12당초
계	6,500	1,000	1,000		1,000	4,500
국 비
도 비
시 비	6,500	1,000	1,000		1,000	4,500
기 타

ꊲ 경관이 아름다운 안골광장 조성사업

［예산서(안) 218쪽］

(아트폴리스담당관, 한호수, 281-2075)

1. 사업목적 및 필요성

○ 안골사거리를 테마와 스토리가 있는 특색 있는 상징공간 조성

○ 도시미관 향상을 위한 야간경관시설 설치로 밝고 아름다운 도시 구현

2. 사업추진근거

○ 테마와 스토리가 있는 특색 있는 경관광장 조성

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 덕진구 인후동 안골광장

○ 사업내용 : 가로시설물 일체화, 야간조명시설 등

○ 사업규모 : 광장조성 1식, 가로환경 조성 L=1,200m

○ 총사업비 : 1,000백만원

○ 사업기간 : 2012 ~ 2013

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행

○ 기본 및 실시설계 용역 완료               : 2012. 6

5. 그간 추진사항

○ 기본(디자인) 및 실시설계 추진중          : 2012. 6

6. ’12년 1회 추경 예산소요

○ 사 업 량 : 광장조성 1식

○ 소요예산 : 200백만원

○ 사    유 : 테마와 스토리가 있는 특색있는 상징공간 조성 및 야간경관시설

7. 연도별 투자계획                                 (단위 : 백만원)

재원별	총사업비	기투자액			‘12년 제1회추경	‘12년 제1회추경 이후	비고
		계	‘11이전	‘12당초
계	1,000			300	200	500
국 비
도 비
시 비	1,000			300	200	500
기 타

ꊳ 아태무형문화유산전당앞 특색거리 조성

［예산서(안) 218쪽］

(아트폴리스담당관, 한호수, 281-2075)

1. 사업목적 및 필요성

○ 아태무형문화유산전당 건립에 따른 도시 미관 개선

○ 보행환경을 개선하는 특화거리 조성으로 한옥마을 관광객 유도 및 구도심 활성화

2. 사업추진근거

○ 아태무형문화유산전당 건축관련 교통영향평가시 인도개설 조건 부여

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 완산구 동서학동 서학로

○ 사업내용 : 한글을 테마로한 특색거리 조성(장승로~남천교~춘향로)

○ 사업규모 : 인도조성L=1.0Km, 한글테마 광장 3개소, 야간경관조명 1식

○ 총사업비 : 1,900백만원

○ 사업기간 : 2011 ~ 2013

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행

○ 기본 및 실시설계 용역 완료                    : 2012. 4.

5. 그간 추진사항

○ 기본(디자인) 및 실시설계 완료                  : 2012. 4.

○ 남천교 ~ 서학지구대앞 인도조성 공사 완료      : 2012. 5.

○ 총괄발주 및 금회 계약 공사추진 중             : 2012. 5.

6. ’12년 1회 추경 예산소요

○ 사 업 량 : 특색거리조성 L=230m(서학지구대 앞 ~ 춘향로 앞)

○ 소요예산 : 450백만원

○ 사    유 : 아태무형문화유산전당 교통영향평가시 인도개설 조건 부여

7. 연도별 투자계획                                (단위 : 백만원)

재원별	총사업비	기투자액			‘12년 제1회추경	‘12년 제1회추경 이후	비고
		계	‘11이전	‘12당초
계	1,900	900	500	400	450	550
국 비
도 비	500	500	500
시 비	1,400	400		400	450	550
기 타

ꊴ 친환경 생활공간 조성사업(도란도란 시나브로길)

［예산서(안) 218쪽］

(아트폴리스담당관, 한호수, 281-2075)

1. 사업목적 및 필요성

○ 도란도란 시나브로길과 전주 한옥마을을 연계한 관광루트 개발

○ 본격적 주 5일 근무(수업)에 따른 역사 및 생태탐방문화 확산

2. 사업추진근거

○ 2012년도 친환경 생활공간 조성사업

○ 친환경생활공간사업 국고보조금 확정(600백만원)

3. 사 업 개 요

○ 위    치 : 전주시 완산구 동서학동 남고동 일원

○ 사업내용 : 녹색둘레길 조성, 소공원,생태체험장,편익,휴식시설,벽화,수목식재

○ 사업규모 : 녹색둘레길 7.8km

○ 총사업비 : 1,200백만원(국비: 50%, 도비 10%, 시비 40%)

○ 사업기간 : 2012. 5 ~ 9

○ 지원형태 : 직접수행

4. 사전 행정절차 이행

○ 2012년 사업제안서 제출 및 확정                  : ‘12. 1.

○ 국고보조금 교부결정 및 송금통자                 : ‘12. 5.

5. 그간 추진사항

○ 국･도비 교부결정 및 송금 완료                   : 2012. 5.

○ 기본(디자인) 및 실시설계 추진중                  : 2012. 6.

6. ’12년 1회 추경 예산소요

○ 사 업 량 : 녹색둘레길 조성 7.8km

○ 소요예산 : 1,200백만원(국 600, 도 120, 시 480)

○ 사    유 : 국도비 매칭 사업으로 시비 확보

7. 연도별 투자계획                               (단위 : 백만원)

재원별	총사업비	기투자액			‘12년 제1회추경	‘12년 제1회추경 이후	비고
		계	‘11이전	‘12당초
계	1,200				1,200
국 비	600				600
도 비	120				120
시 비	480				480
기 타