제292회 전주시의회 제1차정례회

도  시  건  설  위  원  회

2012년도

주요업무보고

도시재생사업단

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	3
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	4
□	기 본 현 황		-------	5
□	주요업무 추진상황
	○	도 시 재 생 과	-------	6
	○	신 도 시 사 업 과	-------	13
	○	스 포 츠 타 운 조 성 과	-------	21

일  반  현  황

□ 기    구 : 3과 11담당

									도시재생사업단
	도 시 재 생 과 (4담당)									신도시사업과 (3담당)								스포츠타운조성과 (4담당)
	도시재생기획담당									택지개발담당								컨벤션기획담당
	해피하우스담당									공공기관이전담당								컨벤션유치담당
	마을만들기담당									에코시티담당								스포츠타운담당
	재생사업담당																	스포츠시설관리담당

□ 인    력

과 별	총 계		일 반 직						기능	비고
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정원	42	1	3	11	15	9	2	1
	현원	42	1	3	11	24	2	-	1
도시 재생과	정원	14	1	1	4	4	3	-	1
	현원	14	1	1	4	7	-	-	1
신도시 사업과	정원	14	-	1	3	4	4	2	-
	현원	14	-	1	3	9	1	-	-
스포츠타운 조성과	정원	14	-	1	4	7	2	-	-
	현원	14	-	1	4	8	1	-	-

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
도 시 재 생 과	○ 도시재생 종합계획 수립 및 정책개발에 관한 사항 ○ 도시재생 시민공감사업 추진 ○ 해피하우스 종합계획 수립 및 사업 시행 ○ 해피하우스센터 운영 및 서비스 제공 ○ 마을재생 종합계획 수립 및 사업 시행 ○ 마을만들기 리더 양성 및 포럼 운영 ○ 주민참여 지역역량강화사업 시행 ○ 도시재생 시범사업 발굴 및 계획수립에 관한 사항 ○ 도시활력증진지역 개발사업 발굴 및 사업 시행 ○ 자력수복형 지역역량강화사업 시행
신 도 시 사 업 과	○ 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 ○ 택지개발사업 계획 및 공사시행 ○ 신시가지 조성 및 행정절차 이행에 관한 사항 ○ 혁신도시 건설사업 추진 ○ 부대이전 및 부지개발에 관한 사항 ○ 교도소 이전사업 등
스포츠타운 조 성 과	○ 종합경기장 이전 및 복합단지 개발사업 ○ 컨벤션센터․호텔․1종육상경기장․야구장 건립 ○ 국제회의․스포츠산업 장기발전계획 수립에 관한 사항 ○ 위탁체육시설 관리(시설관리공단) ○ 공공체육시설 확충사업 ○ 공공체육시설 보수 및 정비사업 ○ 마을단위 소규모 체육시설 관리

기  본  현  황

□ 택지개발 현황

구 분	계		완 료		추 진 중
	개소수	면 적(㎡)	개소수	면 적(㎡)	개소수	면 적(㎡)
합 계	30	23,567,490	26	15,697,848	4	7,869,642
구획정리	12	6,819,077	12	6,819,077	-	-
택지개발	13	6,342,924	13	6,342,924	-	-
도시개발	5	10,405,489	1	2,535,847	4	7,869,642

□ 공공체육시설 현황

개소수	전문체육시설	생활체육시설	비고
계	8개소	10개소
18개소	월드컵경기장, 종합경기장 실내체육관, 완산수영장 경 륜 장, 화산체육관 야 구 장, 빙상경기장	실․내외 인라인롤러경기장 실내배드민턴장, 승 마 장 게이트볼구장, 론 볼 링 장 덕 진 수 영 장, 완산체육공원 덕진체련공원, 아중체련공원

도시재생과  소관

ꊱ	천사마을 가꾸기 사업	--------------------------------						7
ꊲ	U-천사마을 시범도시 구축		------------------------					8
	시민이 참여하는 도시재생사업 추진					---------		9
	마을공동체 복원을 위한 마을재생사업 추진						---	10
	단독주택 해피하우스사업 운영			------------------				11
ꊶ	해피하우스지역 내 태양광 설비 설치				---------------			12

천사마을 가꾸기 사업

○ 지역의 자산인 “얼굴없는 천사”를 활용한 국토부 도시재생 R&D사업

테스트베드의 성공적 추진 및 도시재생 성과 도출

○ 노송동 도시재생시범지역 환경개선 및 나대지를 새로운 주민복합 커뮤니티

공간으로 재창조하여 자력수복형 도시재생모델 창출

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2011년 ~ 2014년(3개년)

○ 대상지역 : 노송동 노후주거지 일원

○ 사업내용

- 거점시설(주민복합) 건립 : 순환형임대주택, 주민공동체 공간, 기부천사 특화공간 등

․건축규모 : 부지 3,772㎡, 3층규모, 연면적 4,700㎡정도 (에너지절감형 그린빌딩)

-  환경정비사업 : 커뮤니티 가로정비사업, 공가정비 사업 등

- 지역역량강화사업 : 마을공동체 활성화사업, 일하며 나누는 주민공방사업 등

○ 총사업비 : 140억원(국비70, 시비70) / ’12년 18억원(국비9, 시비9)

□ 추진상황

○ 국토부 도시재생 R&D 테스트베드 선정	’10. 12월

○ 천사마을 가꾸기 공모사업 사업비 확보	’11. 11월

○ 중기지방재정계획 반영 및 지방재정투융자 심사완료	’11. 11월

○ 공유재산관리계획 시의회 승인	’12.  2월

○ 주민복합 커뮤니티센터 건립안 자문 및 협의(규모 등)	’12. 4~6월

□ 금후계획

○ 지역역량 및 환경정비 사업 추진	’12.  7~12월

○ 주민복합 커뮤니티센터 현상설계 공모	’12.  8월

○ 주민복합 커뮤니티센터 사업 기본 및 실시설계	’12. 12월

○ 주민복합 커뮤니티센터 공사 착공	’13. 상반기

○ 주민복합 커뮤니티센터 공사 준공	’14. 하반기

U-천사마을 시범도시 구축

○ 첨단IT기술과 유비쿼터스 서비스를 융․복합하여 도시운영관리의
효율성 및 삶의 질을 향상시키는 유비쿼터스 시범도시 구축

○ 도시재생 테스트베드와 연계한 그린 인프라 구축을 통해 도시재생형

U-City 모델 구현

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2012. 7 ～ 12월

○ 대상지역 : 노송동 일대(도시재생 테스트베드 노후주거지 재생사업지구)

○ 사업내용 : 노후주거지 사회안전 도시재생 U-City 특화서비스

- 무선네트워크 정보통신 인프라 및 통합운영센터 구축

- 통합관제형 U-안심보안등 설치

- U-디지털 그린놀이터 구축 등

○ 사 업 비 : 14억원 (국비 7억, 시비 7억)

□ 추진상황

○ U-시범도시 국토부 공모사업 응모	’12. 5월

○ U-시범도시 현장실사	’12. 5월

○ U-시범도시 공모사업 시범사업 도시 선정	’12. 5월

○ U-시범도시 추진 협약체결(전주시, 전주정보영상진흥원)	’12. 6월

□ 금후계획

○ 기본계획 수립 및 사업계획 국토부 승인	’12. 7월

○ 사업 시행	’12. 8~12월

시민이 참여하는 도시재생사업 추진

○ 도시재생에 대한 이해와 직접 참여기회 제공으로 도시재생 시민

역량강화 및 민간차원의 홍보 활성화

○ 시민과 전문가그룹이 참여하는 창의적 도시재생 아이디어 발굴과

시정 반영을 통한 시민 참여형 도시재생 실현

□ 사업개요

○ 추진시기 : 연    중

○ 사업내용 : 도시재생 서포터즈 운영, 도시재생 아이디어 공모

○ 소요예산 : 27백만원(서포터즈 운영 17 / 아이디어 공모 10)

□ 추진상황

○ 도시재생 대학생 서포터즈 운영(55명)	’12. 4~12월

- 서포터즈 오리엔테이션 및 워크숍 개최 : 3회

- 페이스북 및 인터넷 카페 운영(도시재생 홍보 및 회원간 정보공유)

- 봉사활동(중앙시장 장나래 축제 등) : 2회

○ 도시재생사업 발굴을 위한 아이디어 공모	’12. 4~6월

- 아이디어 공모 홍보 및 참여 협조(대학교, 관련학회 홈페이지 및 페이스북 등)

․ 도내 대학 관련학과 교수 면담 참여 요청

※ 접  수 : 23건(기반조성사업 18, 프로그램개발 5 / 도내 14, 도외 9)

□ 금후계획

<도시재생 서포터즈 운영>

○ 운영내용 : 워크숍 개최, 도시봉사활동, 도시탐방, 선진사례지 견학 등

○ 서포터즈 활동사항 발표 및 활동집 발간	’12. 12월

<도시재생 아이디어 공모>

○ 공모작품 심사․선정 및 시상	’12. 7~8월

○ 제안 아이디어 정책 반영 추진(관련부서 통보)	’12. 8월

○ 우수작 전시 및 작품집 발간	’12. 8월

마을공동체 복원을 위한 마을재생사업 추진

○ 살고 싶은 동네를 만들어가기 위해 주민간에 소통하고 스스로 직접

참여하는 지역공동체 복원 프로그램 운영

○ 마을재생 리더 양성 등을 통한 지역공동체문화 형성 및 지역문제를

스스로 해결해 나가는 도시재생 역량강화

□ 사업개요

○ 추진기간 : 연    중

○ 사업내용 : 마을재생학교 운영, 마을재생사업 추진, 마을재생 포럼 운영 등

○ 소요예산 : 117백만원(마을재생학교 12, 마을재생사업 100, 마을재생 포럼 5)

□ 추진상황

○ 마을재생학교 운영 : ’12. 4 ~ 9월 (5개동 / 5개월 과정)

○ 마을재생 리더 양성 아카데미 운영 : ’12. 6 ~ 8월(10회 운영)

○ 마을재생사업 추진 : 희망사업 조사 및 설계 등

○ 마을재생 네트워크 포럼 운영 : 3회

□ 금후계획

○ 마을재생 리더양성 아카데미 실습결과 발표회	’12.  8월

○ 동(洞)․동(同)․동(動) 마을재생학교 운영 발표회	’12.  9월

○ 마을재생사업 추진 및 완공	’12. 7~10월

○ 마을재생 네트워크 포럼 운영	월별 1회

단독주택 해피하우스사업 운영

노후주거지의 점진적 재생에 해피하우스 사업을 도입하여 주민의
생활여건을 개선하고 삶의 질을 향상시켜 단독주택지역 도시재생 성공 추진

□ 사업개요

○ 사 업 장 : 인후센터, 노송센터, 완산센터

○ 사업내용 : 주택유지관리, 에너지효율개선, 주거복지 서비스

○ 사업기간 : 2010 ~ 2015년(6개년)

○ 사 업 비 : 542백만원(도비 25, 시비 517)

□ 추진상황

○ 해피하우스 국토부 시범사업 선정 (’09. 10) : 인후2동

- 인후2동 해피하우스센터 개소 및 서비스 실시	’10. 2월

○ 해피하우스사업 확대 운영 (자체사업)	’11. 9월

- 인후2동 해피하우스센터 확대 운영 : 인후1동, 드림스타트권역

- 신규 해피하우스사업 지역 확대(노송동, 완산동)

○ 서비스 추진실적

(2012. 6. 30기준)

계	문․ 창	욕실․ 변기	보일러점 검, 보 수	보온재	콘센트 스위치	전원 차단기	간선․누전점검	대문․ 인터폰	환 기 설비등	주 방 부속류	설치 지원 ․상담	고효율 PL등 교체	방 역
668세대 3,192건	515	330	70	3	641	125	178	174	185	128	340	199	304

□ 금후계획

○ 해피하우스 서비스 지속 제공(3개 센터)	’12. 2~12월

○ 센터별 마을개선 희망사업 추진	’12. 6~12월

○ 해피하우스 사업지역 확대 추진 검토	’12. 7월

- 해피하우스 인접지역중 노후된 단독주택 비율이 높은 지역으로 확대

해피하우스지역 내 태양광 설비 설치

○ 해피하우스사업 지역 내 태양광 신재생에너지 설비를 설치하여

에너지 효율개선 서비스 제공

○ 이산화탄소 등 온실가스 감축으로 지구 온난화 방지 및 저탄소

녹색성장을 추구하는 정부 정책의 적극 실현

□ 사업개요

○ 대 상 지 : 해피하우스 사업지역

○ 사업기간 : 2011 ～ 2015년

○ 사업규모 : 매년 30～50가구 정도

○ 사업형식 : 그린빌리지(Green Village)사업

○ 2012년 신청가구 : 30가구(인후2동 금평초교 부근)

※ 2012년 사업비 : 243백만원(국비 123, 시비 60, 자부담 60)

□ 추진상황

○ 그린빌리지사업 안내 및 신청 접수	’11. 7～8월

○ 주민설명회 개최(주민, 전문기업 참여)	’11.11월

○ 전문기업 선정 및 신청가구 사전 실태조사	’11.12월

○ 전문기업과 주민간 표준설치 계약 체결	’12. 2월

○ 2012년도 사업신청서 제출	’12. 2월

○ 2012년도 그린빌리지사업 승인	’12. 3월

○ 태양광 설비 설치 완료 및 보조금 지급	’12. 6월

□ 금후계획

○ 태양광 설치 전․후 효과 지속적 모니터링	’12. 7~12월

○ 설치에 따른 효과 비교 후 해피하우스사업 지역내 확대 추진

- 에너지관리공단과 국비확보 등 지속적 협의

신도시사업과 소관

ꊱ	35사단 이전사업	------------------------------------------					14
ꊲ	에코시티 조성사업(부지개발)				----------------------		15
ꊳ	에코시티 조성사업(헬기장 이전)					-----------------	16
ꊴ	전북혁신도시 개발사업		--------------------------------				17
ꊵ	만성지구 도시개발사업		--------------------------------				18
ꊶ	효천지구 도시개발사업		--------------------------------				19
	전주교도소 이전사업 추진			--------------------------			20

35사단 이전사업

북부권 개발을 통한 지역 균형발전 도모 및 광역도시 기반구축을

위한 군부대 이전사업 추진

□ 사업개요

○ 위    치 : 임실군 임실읍 대곡리․정월리․감성리 일원

○ 사업규모 : 7.3㎢(223만평), 건물 229동

○ 사업비(민자) : 3,371억원 - 기부 대 양여사업

○ 사업기간 : 2006. 3 ~ 2013. 6월

□ 추진상황 : 전체 공정율 40% (2012. 6월말 현재)

○ 국방부 이전협의 승인(기부 대 양여사업)	’02. 8월

○ 35사단 이전 협의(전주시↔임실군)	’04. 3월

○ 35사단 이전 합의각서 체결(전주시↔35사단)	’05.11월

○ 민자사업 협약체결(전주시↔에코시티)	’06. 3월

○ 실시계획 승인․고시(국방부)	’07. 4월

- 실시계획 무효확인 본안소송(1․2심) : 국방부 패소

- 대법원 상고(’11. 10. 1) ⇒ 대법원 선고(’12.7.5) : 원심파기 환송(서울고법)

○ 실시계획 (재)승인고시(국방부)	’10. 5월

- 본안소송 1․2심『기각』판결, 원고(주민) 상고(’11.12.27) 대법원 계류중

○ 공사 재 착공	’10. 7월

□ 금후계획

○ 부대이전사업 공정률 70%이상 추진	’12. 12월

○ 부대이전사업 준공	’13.  6월

○ 기부․양여재산 협의 및 부대이전 완료	’13. 12월

에코시티 조성사업(부지개발)

지역 균형발전 및 광역도시 기반 구축을 위하여 도심지에 존재하는
군부대를 이전하고 북부권 개발을 선도할 친환경 생태도시 에코시티 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 호성, 송천, 전미동 일원

○ 면    적 : 1.99㎢(35사단 1.11, 항공대 0.28, 사유지 0.61)

○ 사 업 비 : 2,515억원

○ 도시기본계획 : 자연녹지(시가화 예정용지)

○ 사업기간 : 2006. 3 ~ 2016. 3월(2013. 9월 부지개발 착공)

○ 시행방식 : 도시개발법에 의한 도시개발사업(혼용방식)

□ 추진상황

○ 민간사업자 협약체결(전주시↔에코시티)	’06. 3월

○ 개발행위허가제한구역 지정	’10. 1월

○ 구역지정 및 개발계획(안) 관련기관 부서협의	’11. 4월

○ 주민공람 및 공청회	’11. 6월

○ 사전환경성검토(초안) 주민설명회 개최	’12. 3월

○ 도시개발구역지정 관련기관 협의(국토부, 국방부)	’12. 5월

○ 도시개발구역지정(개발계획 포함) 관련 시 도시계획위원회 심의	’12. 6월

○ 도시개발구역지정(개발계획 포함) 승인․고시	’12. 7월

□ 금후계획

○ 각종 영향평가(환경, 교통, 재해) 용역시행	’12. 7월~

○ 보상절차이행 추진(공고 및 열람, 협의회 설치, 감정평가)	’12. 8월~

○ 실시계획인가 고시	’13. 7월

○ 공사착공 및 완료	’13. 9~ ’16. 3월

에코시티 조성사업(헬기장 이전)

헬기장을 이전함으로써 전주시의 장기적인 도시발전과 북부권 지역

주민들의 재산권 확보 및 기초생활권 보장 등 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 현 위 치 : 전주시 송천동 산190-2번지 일원 ⇨ 임실6탄약창

○ 부지면적 : 317,384㎡(96천평)

○ 항공대 등급 : 지원항공작전기지 ⇨ 헬기전용작전기지

○ 주요시설 : 항공대 2개소(206 : 훈련 및 수송,  506 : 작전)

- 활주로 :  L=1.5㎞ ⇨ L=0.5 ∼ 1.0㎞ 내외

□ 추진상황

○ 항공대부지 시가화 예정용지지정요청(국방부→건교부)	’02. 6월

○ 대체부지 확보시 헬기전용작전기지로 변경가능 검토(합참)	’09.12월

○ 35사단이전지역(항공대포함) 개발행위허가 제한지역지정고시	’10. 1월

○ 206항공대 후보지 검토요청(전주시→국방부)	’10.10월

○ 항공대 이전 최적후보지 선정용역 시행(KIDA)	’11. 3월

○ 군사시설 이전건의 및 협의요청	’12. 5월

- ①논산 육군항공학교 ②군산비행장 ③임실6탄약창 또는 임실 35사단 이전부지 내

○ 항공대 이전 이전협의 및 사업방식 승인 통보(국방부→전주시)	’12. 6월

- 사업방식 : 기부 대 양여사업, - 이전지역 : 206항공대대 ⇨ 임실 제6탄약창

□ 금후계획

○ 신 헬기장 이전부지 세부여건 등 검토(소음, 축산피해 등)	’12. 7월

○ 신 헬기장 이전부지 환경영향평가 실시	’12. 9월

○ 신 헬기장 이전 합의각서 체결	’12.12월

○ 신 헬기장 이전 실시계획 승인․고시	’13. 3월

○ 공사 착공	’13. 9월

○ 사업 완료	’15. 9월

전북혁신도시 개발사업

○ 공공기관 지방이전을 통한 지방재정 확충 및 지방 균형발전 촉진

○ 지역전략산업과 연계한 지역발전 성장거점 육성

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 장동․만성동․중동․상림동, 완주군 이서면 일원

○ 규    모 : 9,909천㎡(전주 3,764, 완주 6,145), 계획인구 30,288명

○ 사 업 비 : 15,229억원

○ 사업기간 : 2007 ～ 2012년

○ 사업시행자 : 한국토지주택공사(68%), 전북개발공사(32%)

□ 추진상황

○ 부지조성공사 : 전체 공정률 85%

○ 이전기관 청사부지 매입 : 10개 기관  ※ 총 이전기관 : 12개

- 미매입 : 한국식품연구원/한국간행물윤리위원회(임차)

○ 공동주택용지 분양(총 15필지중 12필지 80%)	’11. 10월～

- 공동주택 5개소 분양

○ 근린․상업용지 분양(총 158필지중 154필지 97%)	’10. 11월～

○ 농촌진흥청 외 6개 기관 착공	’11. 7～11월

○ 혁신도시 이전기관 직원․가족 지역탐방 행사(1회)	’12. 5월

□ 금후계획

○ 부지조성공사 2012. 12월 목표 : 100%

○ 1개기관(한국식품연구원) 청사 부지 매입	’12년 하반기

○ 미착공 기관(한국전기안전공사 외 3개) 착공	’12. 8～10월

- 한국전기안전공사(8월), 한국농수산대학(9월), 국민연금공단(9월),
한국식품연구원(12월)

만성지구 도시개발사업

○ 북부권 계획적인 정비와 토지이용의 합리화

○ 균형 있는 도시개발로 광역도시 기틀 마련

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 만성동 400번지 일원

○ 규    모 : 1,434천㎡(계획인구 16,788명 5,596세대)

○ 사 업 비 : 4,757억원

○ 사업기간 : 2008. 12 ~ 2015. 12월

○ 사업시행자 : 한국토지주택공사, 전북개발공사

○ 시행방식 : 도시개발법에 의한 수용 및 사용방식

□ 추진상황

○ 도시개발구역 지정 승인 (국토해양부)	’08. 11월

○ 구역 지정 및 개발계획 수립 고시(전주시)	’08. 12월

○ 보상계획 열람 공고	’09.  9월

○ 개발계획변경 및 실시계획인가	’09. 12월

○ 법원․검찰청 용지 선수공급 계약체결 (선수금 24억)	’09. 12월

○ 공동 사업시행 합의(LH 41%, 전북개발공사 59%)	’11. 10월

※ LH : 583,703㎡(40.7%), 전북개발공사 : 850,490㎡(59.3%)

○ 구역지정 변경, 개발계획 변경, 실시계획변경인가 고시	’11. 12월

□ 금후계획

○ 보상 착수	’12.   9월

○ 공사 착공	’12. 10월

○ 공사 준공	’15. 12월

효천지구 도시개발사업

○ 전주시 남서부지역 주택 수요에 능동적으로 대처

○ 계획적인 도시개발을 통한 지역 균형개발 촉진

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 완산구 효자동 2가, 삼천동 2가 일원

○ 규    모 : 673천㎡(계획인구 14,352명 4,784세대)

○ 사 업 비 : 1,320억원

○ 사업기간 : 2005. 12 ～ 2017. 12월

○ 사업시행자 : 한국토지주택공사(LH)

○ 시행방식 : 도시개발법에 의한 환지방식

□ 추진상황

○ 도시개발구역 지정(건교부)	’05. 12월

○ 개발계획 수립 고시(건교부)	’07. 12월

○ 환지방식 추진을 위한 주민설명회(12회)	’10. 9～’11. 5월

○ 환지방식 동의서 제출(LH전북본부 → LH본사)	’11.  5월

- 소유자 332명중 253명(76.2%), 면적 672,373㎡중 545,877㎡(81.2%)

- 집단환지 신청 77.8%(사유토지 586,057㎡중 456,268㎡)

○ 환경영향평가에 따른 주민공람 및 설명회(삼천3동)	’11. 11월

○ 각종 영향평가 용역(환경, 교통, 재해, 교육) 추진

○ 구역, 개발계획(변경) 및 실시계획인가 제출(LH → 국토부)	’12.  4월

□ 금후계획

○ 구역, 개발계획(변경) 및 실시계획인가(국토부)	’12.  9월

○ 보상 착수	’12. 10월

○ 공사 착공	’14.  3월

○ 공사 준공	’17. 12월

전주교도소 이전사업 추진

○ 교도소 주변 인근(직선거리 200m)까지 급격한 시가화로 주거환경 저해

○ 재소자 사생활 침해 논란 및 서남권 도시개발 장애요인

□ 현 교도소 현황

○ 위    치 : 전주시 완산구 평화동3가 99번지 일원

○ 부지면적 : 109,256㎡ / 수용인원 1,300여명

○ 설치시기 : 1972.12. 7 / 용도지역(도시관리계획) : 자연녹지

※ 기본조사 및 타당성조사 용역비 50백만원 확보

□ 추진상황

○ 교도소이전 건의(전주시→법무부)	’02.  7월

○ 교도소이전 후보지 선정보고(전주시→법무부)	’10.  6월

○ 후보지선정 철회요구 집단민원 제기(상림․용복동 등)	’10.  9월

○ 교도소신축 이전후보지 재추천지시(법무부→전주시)	’10.  9월

○ 타당성조사 용역 완료시까지 연기요청(전주시→법무부)	’10. 11월

○ 전주시 계약심의위원회 개최(재무과)	’11. 12월

○ 국토계획학회 용역 과업내용 협의(8회)	’11.10~’12.6월

※ 과업내용에 대하여 국토계획학회와 최종 협의 후 용역 추진

□ 금후계획

○ 타당성조사 용역 계약(국토계획학회)	’12. 7월

○ 교도소이전 타당성조사 용역 추진(국토계획학회)	’12. 7~’13. 5월

○ 후보지 추천 보고(전주시→법무부)	’13. 5월

○ 행정절차이행을 위한 기본조사설계 용역 추진(법무부)	’13. 6~12월

○ 교도소 이전사업 추진(법무부)	’14 ~ ’18년도

스포츠타운조성과 소관

ꊱ	전주종합경기장 이전사업	----------------------------					22
ꊲ	전시․컨벤션, 호텔 건립사업				----------------------		23
ꊳ	완산체육공원 실내테니스장 조성					----------------	24
ꊴ	노후 공공체육시설 유지보수			-----------------------			25

전주 종합경기장 이전사업

현 종합경기장을 이전 건립하고 종합경기장 부지를 컨벤션 등 복합단지로 개발함으로써, 구도심 활성화 및 스포츠시설 집적화로 도시공간구조 개편

□ 사업개요

○ 이전위치 : 전주시 덕진구 장동 월드컵 경기장 주변

○ 부지면적 : 200,000㎡ 정도(시유지 79,904㎡ 포함)

○ 사업추진 방식 :「기부 대 양여」방식에 의한 민간자본 유치

- 종합경기장 이전과 양여 토지 수익사업 동시 시행

○ 시설개요

<기부시설>

- 1종 육상경기장 : 10,000석 정도(20,000석 증축 가능 구조)

- 야구장         : 12,000석 정도(25,000석 증축 가능 구조)

<양여재산>

- 현 종합경기장 부지 64,000㎡ 정도

□ 추진상황

○ 도유재산 무상 양여계약 체결	’05.12월

○ 종합경기장 부지 도시기본계획 변경(주거⇒상업용지)	’07. 5월

○ 종합경기장 이전 및 복합단지개발사업 의회 동의	’10. 4월

○ 민간사업자 공모	’11. 1월

○ 민간사업자 공모 철회	’11. 5월

○ 종합경기장 이전 및 복합단지개발사업 변경계획 의회동의	’11.12월

○ 사업관리자 선정	’12. 1월

○ 민간사업자 공모	’12. 4월

○ 사업제안서 제출(2개 업체)	’12. 5월

○ 민간사업자 선정	’12. 6월

□ 금후계획

○ 투․융자 심사(행정안전부)	’12. 7월

○ 민간사업자 협약체결 및 사업착수	’12. 8월

○ 보상 및 각종 행정절차 이행	’12. 9월~

○ 공사 시행	’13~ ’16년

전시․컨벤션, 호텔 건립사업

종합경기장 부지에 전시․컨벤션센터 및 호텔을 건립하여 차별화된 문화자산을 보유한 경쟁력 있는 도시기반 구축

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 덕진동 1가 1251번지 일원

(현 전주종합경기장 부지)

○ 부지면적 : 50,000㎡ 정도

○ 소요예산 : 590억원 정도(국비 50%, 지방비 50%)

※ 국․공유지 매입비 75억원 정도 별도

○ 사업방식 : 전시․컨벤션 ⇒ 재정사업, 호텔 ⇒ 민간자본 유치

□ 추진상황

○ 종합경기장 양여(전북도 ⇒ 전주시)	’05.12월

○ 사업계획 동의안 의회 승인	’10. 4월

○ 전시산업발전사업 주관기관 선정(지경부)	’10.12월

○ 전시․컨벤션 건립 사업계획 변경 의회 동의	’11.12월

○ 지식경제부 전시산업발전심의위원회 심의 신청	’12. 2월

○ 지식경제부 전시산업발전심의위원회 심의	’12. 2~7월

○ 호텔 투자자 모집 공고	’12. 4월

○ 호텔 사업제안서 제출(2개 업체)	’12. 5월

○ 호텔 민간사업자 선정	’12. 6월

□ 금후계획

<전시․컨벤션 건립>

○ 타당성 조사 용역	’12. 6~ 8월

○ 중앙 지방재정 투․융자심사	’12. 9~10월

※ 2013년 국비 반영 노력

○ 사업 시행	’13. 1~’16.12월

<호텔 건립>

○ 민간사업자 협약 체결 및 사업착수	’13. 1~’16.12월

※ 전시․컨벤션 건립 일정에 맞추어 추진

완산체육공원 실내테니스장 조성

테니스인의 오랜 숙원사업이었던 실내테니스장을 설치함으로써 엘리트

테니스인 저변 확대와 동호인의 생활체육 활성화 도모

□ 사업개요

○ 사업내용 : 기존 코트 4면(3,200㎡) 지붕덮개 및 조명시설 설치

○ 사업기간 : 2012. 1 ~ 12월

○ 사 업 비 : 1,600백만원(광특 480, 시 1,120)

□ 추진상황

○ 부지선정 및 규모 관련 동호인 등 의견수렴	’10. 9월

- 완산체육공원 테니스장 활용<테니스 동호인 530명 대상>

○ 공유재산관리계획안 의회 승인	’10.11월

○ 용역과제 심의절차 이행	’11. 5월

○ 공유재산관리계획변경안 의회 승인	’11.12월

○ 기본 및 실시설계용역 착수	’11.12월

○ 전문가 간담회 등 의견수렴 및 실시설계용역	’12. 1～6월

- 도시계획시설변경 및 실시계획인가, 경관심의 등 행정절차 이행

□ 금후계획

○ 공사 착공	’12. 8월

○ 공사 준공	’12.12월

노후 공공체육시설 유지보수

노후화된 체육시설의 안전사고 예방 및 이용 불편 해소를 위한 시설의
효율적인 유지보수로 시민건강 유지와 여가 생활공간 제공

□ 사업개요

○ 대    상 : 18개 체육시설

- 전문체육시설( 8) : 월드컵경기장, 종합운동장, 실내체육관, 경륜장,

완산수영장, 화산체육관, 야구장, 빙상경기장

- 생활체육시설(10) : 실내․외인라인롤러경기장, 실내배드민턴장,

승마장, 게이트볼장, 론볼장, 덕진수영장,

완산체육공원, 덕진․아중체련공원

○ 사업내용

완산체련공원 인조잔디 유소년 축구장 조성 (461백만원)

- 인조잔디 조성 5,760㎡, 조명시설 등 시설물 정비 등

완산체련공원 게이트볼장 비가림시설 설치 (350백만원)

- 철골 막구조 2면, 인조잔디 조성 1,200㎡

실내체육관 보수 공사 (240백만원)

- 경기장 바닥재 교체(1,500㎡) 및 시설 보수

○ 사업기간 : 2012. 1 ～ 12월

○ 사 업 비 : 1,051백만원(특교 350, 광특 72, 기금 350, 시 279)

○ 공공체육시설 유지보수 실시설계용역 시행	’12. 1~12월

- 협회 관계자 및 동호회 등 의견수렴, 실시계획인가 등 행정절차 이행

□ 금후계획

○ 공공체육시설 유지보수 사업 시행	’12. 7~12월

- 인조잔디 유소년 축구장 조성 외 3개 사업 순차적 공사 착공