제296회 전주시의회 제2차정례회

복  지  환  경  위  원  회

2012년도

주요업무 추진상황 보고

맑은물사업소

https://jwater.jeonju.go.kr

보  고  순  서

□	일 반 현 황		--	1
□	부 서 별 주 요 기 능		--	2
□	기 본 현 황		--	3～7
□	주 요 업 무 추 진 상 황		--	8～33
	○	수 도 행 정 과	--	8～10
	○	급 수 과	--	11～19
	○	수 질 관 리 과	--	20～24
	○	하 수 과	--	25～33

일  반  현  황

□ 기   구 : 4과 14담당(1전산실, 1센터, 1시험소, 12사업장)

																																																								맑은물 사업소
		수도행정과																																					급 수 과																																			수질관리과																				하 수 과
수도행정							완산요금							덕진요금										체납징수													맑은물공급										급수시설											누수방지					계량기관리												수질관리					수질분석						생산관리								하수행정			하 수 시설			하수정비
전산실																																		누수신고센터				계량기시험소																					방수리 취 수 장			전미취수장								인후배수지		천마배수지			효자배수지			완산배수지		송천배수지				서신배수지					금암배수지			화산배수지					대성정수장		팔복정수장

□ 정‧현원

부 서 직 급		정 원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과	하 수 과
합 계		92	91	22	25	31	13
일반직	소 계	55	54	13	15	14	12
	4급	1
	5급	4	5	2	1	1	1
	6급	14	12	4	4	1	3
	7급	23	28	7	5	11	5
	8급	8	3				3
	9급	5	6		5	1
연 구 사		4	4			4
기 능 직		33	33	9	10	13	1

※ 청경 18명,  공무직 20명, 휴직 2명(일반직 1, 공무직 1)

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
수도행정과	• 맑은물사업소 운영 총괄 • 상수도공기업특별회계 운영 • 공사 및 용역계약, 물품관리 • 상․하수도사용료 과징업무 전반 • 상수도요금 인상 및 조례 개정 • 검침업무 관리 • 상․하수도 급수전 관리 및 수도 단속
급 수 과	• 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 • 상수도 중장기계획 수립․시행 • 비상급수계획 및 대책수립 총괄 • 급수공사, 상수도 증설 및 확장공사 • 간이상수도 유지관리업무 • 누수탐사 및 누수복구업무 및 누수방지대책 수립 • 누수신고센터 운영관리 • 급수중지․개전․폐전에 따른 계량기 관리 • 고장․노후계량기 교체관리 • 계량기시험소 운영관리
수질관리과	• 생활․공업용수 등 원․정수 확보 및 생산 • 광역상수도 수요에 따른 수급조절 및 관리 • 각 사업장 구축물․건물 유지보수 및 안전관리 • 국가공인수질검사기관 적정운영 및 정도관리 • 먹는물 공동시설(약수터) 및 간이상수도 수질검사 • 상수도 원․정수 수질관리 및 보전 • 상수원보호구역 관리
하 수 과	• 하수도 기본계획 수립 • 하수도공기업특별회계 운영 • 하수도사용료 조정 및 징수관리 • 하수관거 정비사업 • 하수관거정비 민간투자(BTL)사업 • 마을하수도 시설 및 유지관리 • 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리 - 하수찌꺼기(슬러지) 처리시설사업 - 총인(T-P) 처리시설사업 - 새만금유역 CSOs 및 초기우수 처리시설사업

기  본  현  황

□ 급수 인구

총인구	급수인구	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유수율(%)	무수율(%)	비고
651,015	648,410명	99.6	348	210,000	69.12	30.88

※ 공업용수 포함

□ 수계별 생산 및 급수구역

구 분			시설용량 (천㎥/일)	급수량 (천㎥/일)	급 수 구 역	급수인구	비율 (%)
총 계			328	292		648,410	100
생활용수	합 계		258	254	33개동	648,410	100
	자체상수도	대 성	40	25	서서학동 일부, 중화산1 일부, 완산동 일부, 효자1일부, 평화1.2일부	63,291	9.8
	광역상수도	전주권	218	229	중앙,풍남,노송, 서신, 동서학동, 서서학동 일부, 삼천1. 2. 3, 중화1일부, 중화2, 평화1.2일부, 진북 효자1일부. 2. 3. 4, 인후1.2.3, 금암1.2, 덕진, 우아1.2, 호성, 팔복, 송천1.2, 조촌, 동산	585,119	90.2
공업 용수	팔복정수장		70	38	팔복동 1, 2산단(17개 업체 공급)

※ 생활용수 급수구역은 생산량 및 수요량에 따라 조절

□ 도․송․배․급수관

〔단위 : ㎞〕

총 연 장	도․송수관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,220	57	730	1,433

□ 상수원 보호구역

상수도사업장	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎢)	상류(Km)	하류(Km)		안내판	표주
계	27.657				43	133
방수리취수장	0.285	1.0	0.5	‘72. 5. 5.	8	26
상관수원지	26.655	전유역		‘24. 6. 9.	10	26
삼천취수장	0.284	2.2 (독배천0.7)	0.3	‘82. 6.19.	11	42
원당양수장	0.104	1.0	0.1	‘80. 8. 2.	6	15
전미취수장	0.329	0.5	0.3	‘67. 8. 5.	8	24

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
계		817,139
상 관 제	완 주 군	2,139	전 주 시
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

□ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)	비고
계		54.97	2,392	1,713	679	71.6
합 류 식			566	566		100.0
분류식	소 계	54.97	1,826	1,147	679	62.8
	오수관거		902	679	223
	우수관거		924	468	456

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계 (6개노선)	88.9	1,010	251	73	5
전주천 (좌, 우안)	23.5	369	142	37	4
삼 천 (좌, 우안)	15.4	155	45	18
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	38	9
아 중 선	12.0	174	16	4
팔복선(공장,생활)	16.9	183	8	5	1
상 관 라 인	10.4	47	2
기 타	6.3

□ 하수․위생처리 시설

구 분	하 수 처 리	위 생 처 리
위 치	덕진구 송천동 2가 1035번지
시설용량	1일 처리능력 ⇨ 403,000㎥ - 1단계 시설 : 113,000㎥ - 2단계 시설 : 190,000㎥ - 3단계 시설 : 100,000㎥	1일 처리능력 ⇨ 290㎘ - 분 뇨 : 30㎘ - 정 화 조 : 260㎘
처리방법	1․2단계 고도처리(CNR)공법 3단계 고도처리(CSBR) 공법	하수 연계처리(1994년부터 시행)

□ 2012년 상수도 특별회계 예산

총 규 모 : 85,001백만원

〔단위 : 백만원〕

세 입			세 출
계 : 85,001(100%)			계 : 85,001(100%)
▣ 상수도사업수익 : 68,564(80.7%)			▣ 상수도사업비용 : 48,673(57.3%)
◦ 영업수익 : ․ 급 수 수 익 : ․ 급수공사수익 : ․ 기타급수수익 : ․ 기타영업수익 : ◦ 영업외수익 : ․ 예금수입이자 : ․ 타회계전입금 : ․ 기타영업외수익 :	66,690 63,388 2,850 132 320 1,874 600 930 344		◦ 영 업 비 용 : 46,784 ․ 인력운영비 : 6,383 ․ 운 영 경 비 : 34,656 ․ 경 상 이 전 : 3,542 ․ 급수 공사비 : 2,203 ◦ 영업 외 비 용 : 1,889
▣ 자본적수익 : 12,880(15.1%)			▣ 자본적지출 : 36,328(42.7%)
◦ 비유동부채수입 : 12,200			◦ 자본투자비 :	30,849
◦ 자본잉여금수익 : 680			◦ 부채상환금 :	4,282
			◦ 기타자본적지출 :	350
▣ 예산외계정 : 3,557(4.2%) (과년도계정)			◦ 예 비 비 :	847

□ 2012년 하수도 특별회계 예산

총 규 모 : 90,664백만원

〔단위 : 백만원〕

세 입			세 출
계 : 90,664(100%)			계 : 90,664(100%)
▣ 하수도사업수익 : 31,008(34.2%)			▣ 하수도사업비용 : 19,152(21.1%)
◦ 영 업 수 익 : 29,898			◦ 영 업 비 용 : 18,606
. 하수도사용료수익 : . 기타 영업수익 :	29,598 300		. 인력운영비 등 : 1,596 . 운영경비 등 : 1,392 . 민간위탁대행사업비 : 15,618
◦ 영업외 수익 : 1,110
. 수 입 이 자 : . 타회계전입금수익 : . 기타 영업수익 :	102 1,000 8		◦ 영업외 비용 : 390
			◦ 특 별 손 실 : 31
			◦ 예 비 비 : 125
▣ 자본적수익 : 56,406(62.2%)			▣ 자본적지출 : 71,512(78.9%)
◦ 비유동부채수입:	10,000		◦ 가동설비자산 :	26,472
◦ 자본잉여금수익:	46,406
․ 타회계건설보조금:	42,906
			◦ 비가동설비자산 :	18,532
․ 공 사 부 담 금 :	3,500
▣ 예산외계정 : 3,250(3.6%) (과년도계정)			◦ 민간자본이전 :	26,108
			◦ 예 비 비 :	400

수 도 행 정 과  소 관

ꊱ	누수 없는 상․하수도 요금 부과 행정 구현	--	9
ꊲ	체납 상․하수도 사용료 징수율 제고	--	10

누수 없는 상․하수도 사용료 부과 행정 구현

○ 검침 부과자료의 철저한 관리로 누수 없는 과징체계 확립

○ 시민편익시책 제고 및 친절행정 강화로 신뢰받는 수도행정 구현

□ 사용료 부과 현황

(단위 : 억원)

구 분	부 과 액		2011년 요금인상
	2011년 10월말	2012년 10월말
합 계	625	797	상수도 10월 18.36% 하수도 8월 113%
상수도	462	537
하수도	163	260

※ 매월 21만건 검침 후 상․하수도, 음식물처리수수료, 물이용부담금 포함 납부 고지

□ 추진상황

○ 수용가 기본자료(주소, 성명)정비 : 공동주택 14만 가구

○ 다량급수업체 일제점검 실시 : 409개소(300톤 이상 급수업체)

- 계량기불량, 이행명령조치, 관련 부서 통보 등 22건

○ 휴면수도전 일제정비 안내문 발송 : 6,936건

○ 이메일 전자고지 및 카드 결재사 추가(신한)등 민원편익 추진

○ 직원 및 검침원 친절 교육 실시 : 매월

□ 금후계획

○ 휴면수도전 일제정비 실시(연중)

- 기  간 : 2012. 10월 ~

- 대  상 : 6,936건 (0톤 : 4,833, 중지 : 2,103)

- 내  용 : 중지, 폐전 대상 수용가 계량기 철거 및 구관막기로 누수 사전예방

체납 상․하수도 사용료 징수율 제고

□ 사용료 징수 현황

(2012. 10월말 현재/ 단위 : 백만원)

구분 년도		조정액	징수액	체납액	징수율 (%)	’11년대비
계		55,948	53,719	2,229	96.1	증 6.4%
상수도	현년도	53,755	51,981	1,774	96.7	증 2.1%
	과년도	2,193	1,738	455	79.3	증25.2%
계		27,041	25,800	1,241	95.4	증 1.2%
하수도	현년도	26,056	25,163	893	96.6	증 1.1%
	과년도	985	637	348	64.7	증 1.3%

□ 추진상황

○ 특별징수기간 운영 : 2회 (’12. 5～7 / ’12. 9~11)

- 91,915건  938백만원 징수

○ 아파트, 원룸, 0톤 수용가 등 테마별 징수독려 : 15회

○ 체납단수전 계고장 교부 및 재산압류 예고

- 우편고지 : 14회 / 7,583세대 3,374백만원

- 방문교부 : 18회 / 3,368세대 1,665백만원

- 체납액 문자메시지 발송 : 3,459명

- 건물주 재산압류 예고문 발송 : 6회 353건 458백만원

- 고액․고질체납자 연락처 및 현황조사 : 2회

○ 고액 및 고질 체납수용가 단수 조치

- 단수 865개소, 839백만원 (개전 851개소, 729백만원 징수)

□ 추진계획

○ 4회 이상 장기 체납자에 대한 계고장 교부 및 납부독려 : 연중

○ 특별 징수반 확대운영 및 고질체납자 단수 등 행정조치 확행

급 수 과  소 관

ꊱ	상수도 전면개량을 통한 맑은 물 공급사업	--	12
ꊲ	팔복배수지 건설 및 혁신도시 배수관 포설	--	13
	전주권광역상수도수수사업 지곡배수지 건설	--	14
	소규모 배수관 포설 사업	--	15
	노후관 교체․갱생 및 통합공사	--	16
	긴급 누수복구 및 누수탐사	--	17
	학교 등 맑은 수돗물 공급사업	--	18
	신속하고 완벽한 상수도 계량기 관리	--	19

상수도 전면개량을 통한 맑은 물 공급사업

○ 선진화된 급수체계 구축으로 유수율 80%이상 향상 및 맑고 깨끗한 수돗물을 시민들에게 안정적 공급

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2009. 3월 ～ 2014. 3월(5개년)

○ 위    치 : 전주시 전 급수구역 일원

○ 총사업비 : 1,436억원(특별회계 517, 일반회계 400, 지방채 519)

- 기투자액 : 890억원(2012년  174억원)

○ 사업규모

- 블록안정화 128개 블록, 노후․불용관 전면개량 50개 블록

- 통합관리센터 신축(서신배수지내) 및 전산시스템 구축 1식

- 상수도관 매설 703㎞(송․배수관로 279, 급수관로 424), 노후계량기 교체 40,201전)

□ 추진상황

○ 공 사 착 공 -------------------------------------- ’09. 3. 24

○ 1차분～4차분 준공(650억 317.2km)-------’10. 7. 23~’12. 9. 8

○ 5차분 착공(198억 108.8km) ------------------’12. 3~’13. 2

▸공사 추진상황 :  전체공정 58% (5차분 65%)

- 상수관로 정비 370㎞ 완료, 통합관리센터 신축 완료

- 대성배수지 증설 중, 급․배수관로 공사 추진 중

○ 사업설명회 개최 83회(통장, 일반시민 등 2,813여명)-------‘09. 3~’12.10

□ 추진일정

○ 시민홍보(주민설명회 등) 지속 실시 --------------------- 연 중

○ 5차분 준공 ------------------------------------------ ’13. 2

○ 전체분 준공 ----------------------------------------- ’14. 3

팔복배수지 건설 및 혁신도시 배수관 포설

○ 송수관에서 직접 공급되는 팔복, 조촌, 동산동 지역에 배수지를

통해 간접방식으로 전환 안정적 수돗물 공급

○ 혁신도시, 법조타운, 유통단지, 첨단산업단지 등에 안정적 생활용수 공급

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2009. 9월 ~ 2013. 12월

○ 위    치 : 전주시 덕진구 팔복동․만성동 일원

○ 총사업비 : 26,305백만원(국비 9,315  시비 16,990)

- 기투자액 23,425백만원 (2012년 3,300백만원)

○ 사업규모

- 배수지 34,500㎥/일(생활용수 30,000, 공업용수 4,500)

- 송․배수관 매설 L= 11.4㎞(송수관 5.4,  배수관 6.0)

□ 추진상황

[팔복배수지 건설] : 공정 85%

○ 팔복배수지 건설 설계용역 추진 --------- ’09. 9월 ~ ’10. 1월

○ 팔복배수지 건설사업 추진 -------------- ’10. 6월 ~ ’13. 6월

- 송ㆍ배수관 매설 L=3.9km, 배수지 3지 구조물 구축 완료

- 배수지 흙쌓기 및 진입도로 공사 중

[혁신도시 배수관 포설] : 공정 70%

○ 혁신도시 배수관 포설 추진 ------------ ’09. 9월 ~ ’13. 6월

- 배수관 포설 L=7.5km중 3.5km완료(대로 1-16호선 제외 매설완료)

- 공업용수 가압장 설치 완료

□ 금후계획

○ 팔복배수지 시험가동 및 준공 --------------- ’13. 5월 ~ ’13. 6월

○ 혁신도시(대로1-16호선)배수관포설 ---- ’13. 2월 ~ ’13. 12월

전주권광역상수도수수사업 지곡배수지 건설

○ 대성정수장 취수원인 임실오원천 취수중단에 따른 평화․서서학동     고지대 급수용 배수지 건설로 안정적 용수공급 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2011. 5월 ~ 2013. 8월

○ 위    치 : 완산구 평화동 2가 산 104-1번지 일원

(급수구역 : 서서학․평화․삼천3동 50,000여 세대)

○ 총사업비 : 13,500백만원(시비)

- 기투자액 8,615백만원 ( ̕12년 5,800백만원)

○ 사업규모 : 배수지 건설 V=15,000㎥, 가압장 신설 Q=30,000㎥/일

□ 추진상황

○ 중기지방재정계획 수립 ----------------------------- ’10. 8월

○ 기본 및 실시설계 용역 시행 ------------ ’11. 5월 ～ ’12. 8월

○ 주민설명회 개최 ----------------------------------- ’11. 9월

○ 지곡배수지 건설사업 추진(공정 47%) ---- ’12. 3월 ~ ’13. 8월

- 기존 정수장 및 취수장 시설 철거 완료

- 배수지 구조물 및 가압장 시설 구축 중

□ 금후계획

○ 송․배수관로 포설 및 진입도로 확장-- ------- ’13. 1월 ~ 8월

○ 시험가동 및 준공 ------------------------ ’13. 7월 ~ 8월

소규모 배수관 포설 사업

○ 취락지역과 떨어져 있어 상수도를 공급받지 못하여 지하수나 간이상수도를 음용수로 사용하고 있는 소규모 미급수지역에 상수도를 공급하여 시민보건위생 개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2012. 1월 ～ 12월

○ 위    치 : 덕진구 우아동 재전마을 일원 등 14개소

○ 총사업비 : 500백만원

○ 사업규모 : 관로매설 L=2.7km, D=40～200mm

□ 추진상황

○ 상반기 배수관 포설사업 완료

- 위    치 : 덕진구 고랑동 삼화마을 등 7개소

- 사 업 량 : 배수관 포설 1.5km(D=40~200mm)

- 사 업 비 : 300백만원

- 수혜가구 : 130세대(190여명)

○ 하반기 배수관 포설사업 완료

- 위    치 : 완산구 중화산동 어은터널 주변 등 7개소

- 사 업 량 : 배수관 포설 1.2km(D=80~200mm)

- 사 업 비 : 200백만원

- 수혜가구 : 161세대(180여명)

□ 금후계획

○ 2013년도 소규모 배수관 포설 공사 대상지 검토 --- ’12. 11월 ~ 12월

노후관 교체 ․ 갱생 및 통합공사

○ 누수 및 적수 발생되는 노후관로를 교체 및 갱생 하여 유수율 향상 기여

○ 급수 다발관을 정비하여 안정적인 급수체계 구축 및 관망 관리 효율 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012. 1월 ~ 11월

○ 위    치 : 전주시 급수구역 일원 (맑은물 공급사업 정비구역 제외)

○ 사 업 비 : 670백만원

○ 세부개요

구 분	교 체(1건)	갱 생(1건)	통합공사(3건)
위 치	덕진구 화전동 (삼례로)	완산구 효자동 (세내길)	완산구 효자동 (안행2길·5길,산월1길)
사 업 량	L=1,300m (d=150mm)	L=700m (d=300mm)	L=600m (d=50~150mm)
매설년도	1982년 매설 PVC	1986년 CI 주철	급수관 정비 순환망 구축
사 업 비	251백만원	242백만원	177백만원

□ 추진상황

○ 통합공사 완료(안행2길 등 3개소) ---------- ’12. 3월 ~ 7월

○ 노후관 교체공사 완료(삼례로) --------------- ’12. 6월 ~ 11월

○ 세관 갱생공사 추진(세내길/착수) ----------- ’12. 8월 ~ 11월

□ 금후계획

○ 세관 갱생공사 완료 ------------------------- ’12. 11월말 완료

긴급 누수복구 및 누수탐사

○ 상수도 관로에서 발생하는 돌발적인 누수를 효율적으로 긴급 복구      함으로써 누수로 인한 예산낭비 방지 및 시민 불편 해소

□ 사업개요

○ 기    간 : 연중

○ 위    치 : 전주시 전 급수구역 일원 (맑은물공급사업 정비구역 제외)

○ 사 업 비 : 500백만원 (긴급누수복구 470, 누수탐사 30)

□ 추진상황

○ 누수민원처리 : 1,670건(2012. 9. 31기준)

- 단가업체 처리 : 도로누수 등 145건/ 270백만원

- 자체처리 : 앵글밸브 교체 등 1,525건(누수 수리원 10명)

○ 누수탐사 추진 : 3개팀 9명/ 66개소

- 자체 탐사 : 누수탐사 2팀 6명/ 39개소

- 용역 탐사 : 용역탐사 1팀 3명/ 27개소

※ 매주 목요일 야간 누수탐사의 날 지정(저녁 10:00 익일 새벽 4:00)

□ 금후계획

○ 하반기 긴급 누수복구 추진 --------------- ’12. 10월 ~ 12월

- 단가업체 처리 : 200백만원

- 자체처리 : 앵글밸브 교체 등 누수민원 신속처리

○ 하반기 누수탐사 추진 ------------------- ’12. 10월 ~ 12월

- 용역탐사, 자체탐사 지속시행

학교 등 맑은 수돗물 공급사업

○ 노후 옥내 급수관의 세척․갱생 또는 교체에 필요한 비용의 일부를  지원하여 맑고 깨끗한 물을 공급하고 시민의 건장증진에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2010년 ~ 2014년(5개년)

○ 사 업 비 : 800백만원(’12년 본예산 150, 추경 100)

○ 지원대상 : 학교, 공동주택, 사회복지시설, 수급자 주택 등

- 배관의 내부가 부식되어 수질기준을 초과하는 경우

○ 지원근거 : 전주시 상수도 급수조례 제 39조(급수설비의 관리 책임 등)

○ 지원범위

- 학      교 : 공사비의 70%이하, 최대 20백만원

- 공 동 주 택 : 공사비의 50%이하, 최대 30백만원

(100세대미만 10백만원, 200세대미만 20백만원, 200세대이상 30백만원)

- 기초수급자 : 전액지원, 최대 2백만원

- 단 독 주 택 : 세대당 최대 30만원 이하(연면적 85㎡이하)

□ 추진상황

○ 2010년 급수설비 지원 완료 : 인후현대아파트 등 7개소, 118백만원

○ 2011년 급수설비 지원 완료 : 평화주공2단지 등 6개소, 104백만원

○ 2012년 상반기 급수설비 지원사업 완료 : 호성동아아파트 등 5개소, 126백만원

○ 2012년 하반기 급수설비 지원사업 추진 : 효자제일아파트 등 7개소, 122백만원

□ 금후계획

○ 하반기 급수설비 개량공사 시행(자체)  ------------ ’12. 10월  ～ 11월

○ 하반기 급수설비 개량공사 완료 및 지원금 지급 ------- ’12. 11월  ～ 12월

신속하고 완벽한 상수도 계량기 관리

○ 유효만기․고장 계량기의 완벽한 교체를 통해 계량의 품질향상을 도모하고

계량기 고장 및 동파의 사전 예방조치 강화로 계량의 신뢰성 향상

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012. 1월 ~ 12월

○ 사 업 비 : 387백만원

○ 사업규모 : 계량기 교체 21,000개

- 유효만기 19,000개, 고장 및 동파 2,000개

□ 추진상황

○ 계량기 교체 ------------------------------------------ 18,600개 342백만원

- 유효만기 16,795개   고장 및 동파 1,805개

(자체인력 9,000    외부업체 2,600   맑은물공급사업 7,000)

○ 불량계량기 색출을 위한 고장계량기 성능시험 ------------- 6,364개

- 구입계량기 5,015   노후․고장 1,173,  민원시험 176개

□ 금후계획

○ 유효만기 및 고장 계량기 교체 지속 실시 :  2,400개  45백만원

- 자체인력 활용 및 하반기 외부업체 위탁 시행

○ 불량계량기 색출을 위한 계량기 성능시험 지속 실시

○ 동파보온비닐 설치 및 상습동파 세대 집중관리(13백만원) : ’12. 10월. ~ ’13. 2월

- 최근 5년내 2회 이상 동파 발생 250세대 집중관리

- 동절기 사전보온 조치(보온재 충전 및 동파방지 비닐설치)등

수질관리과  소관

ꊱ	완벽한 안전성 검증으로 고품질 수돗물 공급	--	21
ꊲ	공업용수 수요증가 추세에 따른 시설개량	--	22
ꊳ	수돗물 생산․관리「국내 최우수 지자체」수성	--	23
ꊴ	2012 노약자 먹는 물 무료 수질검사 확대	--	24

『상수도 전면 광역화 대비』

완벽한 안전성 검증으로 고품질 수돗물 공급

○ ‘생산주체 수자원공사 단일화’로 인한 안전성 및 민원처리 부실 등을      우려하는 일부 의견에 대하여 철저한 검증 시스템과 민원처리체계 구축

□ 사업개요

○ 광역상수원 관리․정수처리공정에 적극적 참여 추진, 주도적 역할

○ 수질감시시스템 강화 및 민원처리체계 정립으로 대시민 신뢰성 확보

□ 추진상황

○ 정수처리공정 주기적 확인, 관련규정 보다 수질검사 강화(적합공급)

- 광역상수도 원․정수 처리과정 점검 및 매월 전항목 수질검사 : 10회

- 광역배수지 주간 수질검사(일반세균 등 15개항목)      : 40회

- 광역수 급수과정(원수~정수~배수지~수도꼭지) 수자원공사 합동점검  : 30회

○ 상수원 수질관리 및 시민이 공감하는 수돗물 안전성 검증

- 수돗물 품질인증제 및『수돗물이동상담소』운영  : 1,301개소

- 수돗물 홍보 캠페인 전개 --- 모니터요원, 공무원  : 300여명

- 수돗물 소비자 모니터요원 확대 ’11년 200명 ⇒ ’12년 267명

- 수돗물 신뢰도 향상을 위한『수돗물 품질보고서』배부 : 20만부

□ 금후계획

○ 수질이상 우려시기(상황) 상수원 및 정수처리공정 집중 점검

- 녹조, 흑수유출, 이취․미 유발 등 수질이상 상황 사전대처, 수습체계 보완

○ 시민이 공감할 수 있는 다양한 수질안전 검증시책 지속적 발굴

-  실효성 있는 시책을 강구, 수돗물 음용 불편과 안전 의구심 해소

공업용수 수요증가 추세에 따른 시설개량

○ 공업용수 추가 수요계획에 부합하는 안정적 용수공급을 위하여 그간     생활용수에 비하여 시설개량이 미진한 공업용수 노후 생산시설의 개량 추진

□ 사업개요

○ 전미취수장~팔복정수장 도수관로(주철관 D600mm) 확장 교체      - 노후․관경협소로 인한 안정적 용수공급 어려움과 잦은 누수민원 해소

○ 도수관로 갱생( L=310m/강관 D700mm) ⇐ ’08부터 연차시행중

구 간	관 종	관경(mm)	연장(m)	시설년도
계 (2개 관로)			7,672
전미취수장~팔복정수장	주 철	D = 600	3,847	1968
	강 관	D = 700	3,825	1989

○ 공업용수 취․정수장의 노후 구축물 개량 및 환경정비

□ 추진상황

○ 도수관로 확장 교체용역중 : D600 ⇒ D800/50백만원(’12.3월~12월)

○ 도수관로 강관 갱생사업 완료: L=310m/177백만원(’12.8.24~9.26)

※ 2008~2012누계 : L=2,179m/3,825m(잔여구간 1,646m)

○ 팔복정수장 노후 기계․전기설비 개량 및 사무실 보수공사 완료

□ 금후계획

○ 팔복정수장 노후 또는 비효율적 시설 및 환경의 지속적 개선

- 용수 생산공정을 제어하는 현장의 통행로 정비

- 정수장내 배수로(L=26m) 정비로 안정적인 구축물 관리

수돗물 생산 ․ 관리「국내 최우수 지자체」수성

○ 환경부 등 외부 평가에서 우수한 성적을 성취한 바, 고품질 수돗물     생산 및 우수한 분석력을 활용한 수도행정서비스로 선진적 위상유지

□ 운영현황

○ 국립환경과학원 『먹는물수질검사기관 제33호』지정-2000.7.25

- 검사범위 : 모든 먹는물, 상수원수, 먹는샘물, 각종 지하수 등

□ 추진상황

○ 수질분석능력 평가 등 외부평가결과

- ’12 국립환경과학원 먹는물수질검사기관 분석능력평가 : 적합(5.31)

- ’11 환경부 수도사업 운영․관리실태 시범평가 결과 : 1위

○ 철저한 상수원 및 정수처리공정 관리 철저

- 상수원(방수리) 수질오염 배출시설 점검           : 3회(17개소)

- 24시간 수질관리 시스템 전직원 직무연찬         : 5회

- 장마철 등 정수장 수질오염 위기대응 모의훈련 실시 : 3회(51명)

□ 금후계획

○ ‘먹는물 수질검사기관’ 2013년 평가대비 사전준비

- 분석능력 배양을 위한 내부 숙련도 시험추진 등 직무연찬

- 공인 수질검사기관 협의체(24개기관) 정보교류

○ 국가공인 검사기관으로서의 시민복지를 위한 역할 확대

- 수질 취약계층에 대한 음용수 관리실태 조사(120개소 방문)

○ 지속적인 먹는물 안전성 검증, 대안제시

- 먹는물 공동시설(약수터) 등 시민 음용시설에 대한 철저한 안전성 검증

2012 노약자 먹는 물 무료 수질검사 확대

○ 먹는물 안전성 취약대상에 대하여 국내 선진 공인 먹는 물 검사기관의     우수한 분석력으로써 부적절한 음용실태 조사․개선을 통한 시민 건강증진 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 영유아보육시설(’10～’12), 사회복지시설(’11～’13)

○ 대    상 : 총 981개소(영유아 보육시설 794, 사회복지시설 187)

○ 추진방법

-「수돗물 이동상담반」구성, 방문상담․조사 및 시료채수

※ 수수료 면제 : 일반세균 등 먹는 물 수질기준 17개 항목(79,700원/건)

□ 추진상황

○ 시설점검 : 총 861개소 점검

연도	점검개소	사회복지시설		영유아 보육시설		비 고
		적 합	부적합	적 합	부적합
’12. 10월	234	74	3	153	4	일반세균 기준초과
’10～’11	627	67	6	500	54

- 부적합 주요 원인 : 정수기 필터 교체주기 미흡 및 관리 소홀

⇨ 검사결과 통보 및 개선방안 제시, 수돗물 안전성 홍보․음용 권고

□ 금후계획

○ 잔여 대상시설(영유아 83개소, 사회복지 37개소) 검사 추진

○ 수질검사 결과에 대한 분석, 원인규명 후 안전음용 방법 제시

- 검사결과 공문발송 및 가능한 수돗물을 직접 음용할 것을 권고

○ 부적합시설 관리상태 재확인

- 부적합 원인에 대한 개선방안 이행여부 확인 및 상담, 재 수질조사

하 수 과  소 관

ꊱ	하수처리편입구역 하수관거 정비사업	--	26
ꊲ	중앙처리구역 하수관거 정비사업	--	27
ꊳ	효자처리구역 하수관거 정비사업	--	28
ꊴ	새만금유역 CSOs 및 초기우수 처리시설 설치사업	--	29
ꊵ	전주 하수처리장 총인처리시설 설치사업	--	30
ꊶ	하수슬러지 처리시설 설치사업	--	31
	매암지구 마을하수도 정비사업	--	32
	진기지구 마을하수도 정비사업	--	33

하수처리편입구역 하수관거 정비사업

○ 전주․삼천 상류지역의 생활하수를 차집 하수처리장에 유입

○ 공공수역 수질오염 방지로 쾌적한 하천 수변 공간제공

○ 농촌동 마을하수도 개량으로 시민 보건위생 증진

□ 사업개요

○ 위    치 : 평화동 장교마을 등 48개 마을

○ 사업규모 : 관거신설 L=76.4㎞, 배수설비 2,045가구

○ 사 업 비 : 39,844백만원(국 19,790, 도 1,419, 시 15,627, 기금 3,008)

- 기 투 자 : 20,599백만원(국 12,694, 시 6,050, 기금 1,855)

- ̕12년 예산 : 9,621백만원(국 1,619, 도 328, 시 7,471, 기금 203)

○ 사업기간 : 2008 ～ 2013(6개년)

□ 추진상황 - 공정 66.1%

○ 지방재정 투융자심사완료(행정자치부) ---------------- ̕07.10월

○ 실시설계용역 및 행정절차 이행 ----------- ̕07. 6월 ～ ̕08. 8월

○ 공사계약, 5개지구 차수별 공사착공 및 준공 --------- ̕08.10월 ～ ̕11.12월

(중복․전주천1~4차 ,평화1~3차, 중인1~4차, 박물관1~3차, 월드컵경기장1차)

○ 4개지구 차수별 공사발주 및 착공 -------------------- ̕12. 3월

(중복․전주천5차 ,평화4차, 중인5차, 월드컵경기장2차)

※전체 L=76.4㎞ 중 L=50.5㎞ 완료

□ 금후계획

○ 잔여구간(L= 25.9km) 사업추진 ---------------2013년 완료 예정

중앙처리구역 하수관거 정비사업

○ 노송천 자연형하천 복원사업 상류 오염원 차단으로 시민에게      생명력 있는 수변공간 제공

○ 하천수, 지하수, 우수등 불명수 감소로 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 중앙, 풍남, 노송동일원(노송천복원사업 상류지역)

○ 사업규모 : 관거정비 L=27.6㎞, 배수설비 3,302가구

○ 총사업비 : 29,826백만원(국 14,913, 도 1,893, 시 10,783, 기금 2,237)

- 기 투 자 : 11,618백만원(국 5,445, 시 5,518, 기금 655)

- ̕12년 예산 : 6,074백만원(국 2,094 도 419, 시 3,298, 기금 263)

○ 사업기간 : 2010 ～ 2013(4개년)

□ 추진상황 - 공정 54.44%

○ 지방재정 투융자심사(전라북도) --------------------- ̕08.10월

○ 실시설계용역 완료 ------------------------- ̕09. 3월 ～ 8월

○ 행정절차이행(재원협의, 설계자문, 일상감사등) 완료 -------  ̕09.10월

○ 공사계약, 착공 및 1~5차분 준공 ------- ̕10. 1월 ~ ̕11.12월

○ 6차분 공사 발주 및 착공(L=6.1km) --------------- ̕12. 3월

※ 전체 L=27.6㎞ 중 L=14.42㎞ 완료

□ 금후계획

○ 6차분 공사 준공 ----------------------------------- ̕12.12월

○ 잔여구간(L= 13.18Km) 사업추진 ------------- 2013년 완료 예정

효자처리구역 하수관거 정비사업

○ 새만금 상류지역 목표수질 조기달성과 삼천 수질개선 시급

○ 하수관거 우․오수 분리와 건물 정화조 폐쇄로 시민보건 위생 향상

○ 하천수, 지하수, 우수 등 불명수 감소로 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 효자처리구역(효자동 일원), 하수처리장 주변마을 등

○ 사업규모 : 관거정비 L=28.9㎞, 배수설비 1,562가구

○ 총사업비 : 20,000백만원(국 10,000, 도 1,900, 시 6,600, 기금 1,500)

- 기 투 자 : 824백만원(국 500 시 273, 기금 51)

- ̕12년 예산 : 3,983백만원(국 2,100, 도 420, 시 1,200, 기금 263)

○ 사업기간 : 2012 ～ 2015(30개월)

□ 추진상황

○ 지방재정 투융자심사 완료(전라북도) ---------------- ̕09.10월

○ 용역과제 심의 완료 -------------------------------- ̕09.11월

○ 실시설계용역 착공 ------------------------------------ ̕11. 2월

○ 행정절차 이행(재원협의, 설계자문, 원가․일상감사등) ----- ̕12. 3월 ～6월

○ 실시설계용역 준공 및 공공하수도 설치인가 ---------------- ̕12. 9월

○ 감리용역 원가심사 및 일상감사의뢰 ---------------------- ̕12. 10월

○ 계약심의 의뢰 ---------------------------------------------  ̕12. 10월

□ 금후계획

○ 공사착공 및 1차분 완료 ---------------- ̕12. 11월 ～ ̕13. 4월

○ 잔여구간 연차별 사업추진 --------------- ̕13. 1월 ～ ̕15. 2월

새만금유역 CSOs 및 초기우수 처리시설 설치사업

○ 새만금유역 수계에서 발생하는 합류식 하수도 월류수(CSOs) 및     초기우수를 적정 저류․연계처리하여 새만금유역 목표수질의 조기달성

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 환경사업소내 및 마전교상류 좌안 둔치

○ 사업규모 : 저류조 1개소(100천㎥), 우수토실 개량 19개소

○ 사 업 비 : 45,450백만원(국 22,725, 도 4,545, 시 15,908 기금 2,272)

- 기 투 자 : 4,401백만원(국 3,249, 도 594, 시 281 기금 277)

- ̕12년 예산 : 13,881백만원(국 7,800, 도 1,560 시 3,542, 기금 979)

○ 사업기간 : 2009년 ～ 2014년(6개년)

○ 사업 추진방법 : 민간대행사업 추진(한국환경공단)

□ 추진상황 (전체공정 30%)

○ 협약체결(환경부, 전북도, 4개시군, 환경관리공단) ---------- ̕09. 8월

○ 종합계획수립 및 타당성조사 용역완료 ----------------- ̕10. 2월

○ 실시설계 적격자 선정 및 우선시공분 계약  ------- ̕10.12월 ~  ̕11. 5월

○ 1차분 공사추진 완료(터파기 및 가시설 설치) ------------- ̕11.11월

○ 2차분 공사계약 완료 --------------------------------- ̕12. 8월

○ 총사업비 및 기간 변경 승인 ------------------------------- ̕12. 7월

※ 총사업비(48,000→45,450백만원), 기간(준공기한 2013 → 2014)

○ 3차분 공사계약 체결 --------------------------------- ̕12.  8월

□ 금후계획

○ 3차분 공사추진 --------------------------- ̕12. 8월 ~ ̕13. 6월

○ 잔여공사 추진 --------------------------- ̕13. 7월 ~ ̕14. 12월

전주 하수처리장 총인처리시설 설치사업

○ 하수도법 개정( ̕10.2.26)으로 새만금 상류지역 하수처리장 방류수     수질기준 강화( ̕12.1.1부터 시행)에 따라 총인(T-P)처리시설 추진 필요

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 환경사업소내(덕진구 송천동2가 1035번지)

○ 규    모 : 403천㎥/일,  총인(T-P) 2.0 ⇨ 0.2mg/L이하

○ 사 업 비 : 31,355백만원(국 15,678, 도 6,271, 시 7508 기금 1,898)

- 기 투 자 : 911백만원(국 530, 도 286, 시 51 기금 44)

- ̕12년 예산 : 16,622백만원(국 9,462, 도 3,785 시 2,187, 기금 1,188)

○ 사업기간 : 2010년 ~ 2014년

□ 추진상황

○ 최초 총인처리사업 추진계획 수립(국무총리실, 환경부) -- ̕08. 12월

○ 하수도법 개정(하수처리장 방류수질기준 강화) -------- ̕10. 2월

○ 기본 및 실시설계 용역 착수 ------------------------- ̕11.  1월

○ 사업추진방법 변경(기타공사→턴키공사) ----------------- ̕11.11월

○ 대형공사 입찰방법 심의(도 지방건설기술심의위원회) -- ̕11. 12월

○ 총사업비 변경(환경부) 완료 (240→314억원) --------- ̕12. 7월

○ 기본계획 및 입찰안내서 심의(시 설계자문위원회) ------ ̕12. 8월

○ 중앙투융자심사 심의완료 -------------------------- ̕12.10월

○ 공사발주 ------------------------------------------- ̕12.11월

□ 금후계획

○ 현장설명회 개최 및 기본계획서제출(60일)- ̕12.11월~ ̕13. 2월

○ 기본설계 적격심의(도) 및 실시설계 적격자 선정 --------- ̕13. 3월

○ 실시설계서 작성(90일) 및 실시설계서 심의	- ̕13. 3월 ~ ̕13. 5월

○ 공사추진 ------------------------------- ̕13. 6월 ~ ̕14. 6월

하수슬러지 처리시설 설치사업

○ ̕12년부터 해양투기 금지정책에 따른 하수슬러지(찌꺼기) 처리시설 추진

○ 하수찌꺼기의 안정적 처리로 자연환경 보전에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 삼천동3가 749번지 일원

※하수슬러지 감량화시설은 전주환경사업소 내 설치

○ 규    모 : 건조 소각(150톤 ⇨ 65톤/일), 감량화(250톤 ⇨ 150톤/일)

○ 총사업비 : 39,845백만원(국비 19,472, 시비 900, 민간투자 19,473)

- 기 투 자 : 900백만원(시비)

-  ̕12년도 1,910백만원(국 1,910)

○ 사업기간 : 2010년 ~ 2014년(5개년)

□ 추진상황

○ 기본 및 실시설계 용역 착수 ------------------------- ̕12. 1월

○ 지역주민 반대로 용역 중지(공정율81%) ------------- ̕04.12월

○ 공모방식에 의한 입시선정(안산,삼삼마을인근) -------- ̕08. 9월

○ 민간투자 정부고시 사업으로 추진결정 ---------------- ̕09. 8월

○ 민간투자 적정성조사 및 타당성조사 용역 ------------- ̕10. 3월

○ 시설사업기본계획 사전심의 -------------- ̕10. 7월 ~ ̕11. 6월

○ 민간투자사업 심의위원회 심의(기재부) -------------- ̕11.12월

○ 시설사업기본계획 고시 ------------------------------ ̕12. 1월

○ 제안서 평가 및 우선협상대상자 선정(주․태영) ------- ̕12. 4월

□ 금후계획

○ 우선협상대상자와 협상실시 및 민투심의----- ̕12. 4월～’13. 1월

○ 실시협약(기재부 민투심의) 및 사업시행자 지정 ------- ̕13. 3월

○ 사업인가(도) 및 실시설계 --------------------------- ̕13. 5월

○ 공사착수 및 준공 ------------------------- ̕13. 6월～’15. 5월

※ 전주시 종합리싸이클링타운 조성사업 일정에 맞추어 추진

매암지구 마을하수도 정비사업

○ 농촌마을 하수도 시설개량 및 우․오수 분리로 하수처리 효율 극대화

○ 주민의 삶의 질 향상 및 새만금 상류지역의 하천수질 개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 성덕동 일원(매암 외 4개마을)

○ 사업규모 : 하수처리시설 Q=190㎥/일, 하수관거 L=8.7㎞

○ 사 업 비 : 4,989백만원(국비 3,492  시비 1,248  기금 249)

- 기투자  :  2,308백만원(국비 1,767, 시비 434, 기금 107)

- ̕12년 확보예산 : 852백만원(국비 122, 시비 722, 기금 8)

○ 사업기간 : 2009년 ～ 2013년

□ 추진상황 (전체공정 60%)

○ 하수도정비기본계획변경 승인(환경부) ---------------- ̕07. 7월

○ 실시 설계용역 완료 --------------------------------- ̕09. 9월

○ 공공하수도 인가신청 및 재원 협의 --------------------  ̕09. 9월

○ 지방재정투융자심사(전라북도) 완료 ------------------ ̕09.11월

○ 인가 및 공사발주(조달청) --------------------------- ̕09.11월

○ 1차 ~ 5차 공사추진 완료 --------------- ̕09.12월 ~ ̕12.10월

※ 하수관로(9.1km) 매설 및 하수처리장(190㎥/일) 설치

□ 금후계획

○ 공사계약 --------------------------------------------  ̕12.11월

○ 잔여분 공사추진(관로매설 및 배수설비, 시운전) ----------- ̕12.12월 ～  ̕13.12월

진기지구 마을하수도 정비사업

○ 농촌마을 하수도 시설개량 및 우․오수 분리로 하수처리 효율 극대화

○ 주민의 삶의 질 향상 및 새만금 상류지역의 하천수질 개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 전미동 일원(진기외 3개마을)

○ 사업규모 : 펌프시설 1개소, 하수관거 L=6.7㎞

○ 사 업 비 : 3,360백만원 (국비 2,352  시비 909  기금 99)

- ̕11년까지 확보예산 64백만원(국비 61, 기금 3)

- ̕12년 확보예산 534백만원(국비 338, 시비 178, 기금 18)

○ 사업기간 : 2010년 ～ 2014년(4개년)

□ 추진상황

○ 하수도정비기본계획변경 승인(환경부) --------------- ̕07. 7월

○ 지방재정투융자심사(전라북도) 완료 ---------------- ̕08.10월

○ 2010년도 국가예산 신청 --------------------------- ̕09. 3월

○ 실시 설계용역 완료 --------------------------------- ̕09. 9월

○ 공공하수도 인가신청 및 재원협의 ------------------- ̕09.11월

○ 진기마을 주민 마을하수처리장 설치반대로 사업 유보 --------- ̕09.11월

○ 사업내용변경 승인(지방환경청) ---------------------- ̕12. 8월

※ 하수처리장을 펌프시설로 변경하여 효자처리구역으로 연계 처리

○ 실시설계 완료  ------------------------------------ ̕12.10월

○ 재원협의 진행(환경청) 중 --------------------------- ̕12.10월

□ 금후계획

○ 총사업비 변경 -------------------------------------- ̕12.11월

○ 공사착공 및 준공 ----------------------- ̕13. 3월 ～ ̕14.12월