제296회 전주시의회 제2차정례회

2012년도행정사무감사/도시건설위원회

2012년도

주요업무 추진상황 보고

아트폴리스담당관

보  고  순  서

□	일 반 현 황	-------	2
□	담 당 별 주 요 기 능	-------	3
□	기 본 현 황	-------	4
□	주요업무 추진상황	-------	5

일  반  현  황

□ 기    구

아트폴리스담당관

아트폴리스

도 시 경 관

공공디자인

도심활성화

□ 정․현원

구 분	총 계	일 반 직					기능	비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	13	1	4	7	1	0	0
현 원	13	1	4	6	2	0	0

담당별 주요기능

담당별	분 장 사 무
아트폴리스	○ 전주 아트폴리스 정책 총괄 ○ 기본경관계획 및 야간경관 기본 계획 수립 ○ 전주시 경관위원회 운영 ○ 경관사업 세부계획 수립 및 시행
도시경관	○ 옥외광고물 개선 종합계획 수립 ○ 옥외광고물 관리 및 정비에 관한 업무 총괄 ○ 전주시 광고물관리심의위원회 운영 ○ 간판이 아름다운 시범거리조성사업
공공디자인	○ 디자인 자문에 관한 사항 ○ 디자인 가이드라인 제정 및 운영 ○ 공공디자인 개선사업 ○ 디자인 DB구축
도심활성화	○ 도심 활성화 계획 수립 및 사업 시행 ○ 전문특화거리 조성 및 지원에 관한 사항 ○ 경관 광장 조성에 관한 사항

기  본  현  황

□ 각종 위원회 현황

(단위 : 명)

위원회명	설 치 근 거	임 무	계	공무원	시의원	민간위원		운영 횟수
						남	여
경관위원회	경관법 25조	전주시 경관조례 제20조 (경관위원회의 구성 및 운영)	20	1	1	15	3	수시
광고물관리 심의위원회	옥외광고물관리 법시행령제32조	전주시 옥외광고물등 관리 조례 제20조(위원회의구성)	8	3		3	2	수시
옥외광고정비기금위원회	옥외광고물 등 관리법 제6조의2	전주시 옥외광고정비기금 설치및 운용 조례 제5조(기금운용관리심의)	7	3	1	1	2	수시

□ 광고업 등록 및 옥외광고물 현황

(단위 : 개/개소)

광고업자 등록현황	옥외광고물	시 지 정 광 고 시 설
		계	게시대	벽보판	기 타	비 고
311	30,196	250	150	100	-	‘12.11.1일 전주시설관리 공단으로 재위탁(3년간)

주요업무 추진상황

ꊱ 도란도란 시나브로길 조성사업 ꊲ 국립무형유산원앞 특색거리 조성사업 ꊳ 전주부성내 골목길(다올길) 디자인 프로젝트 ꊴ 아중저수지 주변 산책로 조성사업 ꊵ 경관이 아름다운 안골사거리 조성사업 ꊶ 아름다운 도시공간 연출을 위한 경관개선 사업	/ 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

도란도란 시나브로길 조성사업

○ 친환경 녹색 생활공간 조성으로 건강하고 아름다운 휴게공간 창출

○ 한옥마을과 연계한 지역의 관광인프라 확충으로 쇠퇴지역 활성화

□ 사업개요

○ 위    치 : 한옥마을~남고산~대성정수장~치명자산~한옥마을

○ 사업규모 : 둘레길 조성 L=7.8km

- 시유지활용 체험학습장, 웰빙황토길(1.2km), 소공원, 벽화사업 등

○ 총사업비 : 1,200백만원(국비 600, 도비 120, 시비 480)

○ 사업기간 : ‘12. 6. ~ ’12. 10.

□ 추진상황

○ 2012년 사업제안서 제출 및 확정                  : ‘11. 12.

○ 기본 및 실시설계 추진                           : ‘12.  4.

○ 국고보조금 교부결정 및 송금통지                 : ‘12.  5.

○ 실시설계용역 완료                               : ‘12.  7.

○ 공사발주 및 착공                                : ‘12.  9.

□ 금후계획

○ 공사 준공                                       : ‘12. 12.

국립무형유산원앞 특색거리 조성

○ 전통 한옥마을과 국립무형유산원을 연결하는 관광벨트 구축

○ 한글의 아름다운 시각적 이미지를 테마로 한  특색거리 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 동서학동 서학로

○ 사업규모 : 특색거리 조성 L=1,000m (장승로～교대앞 ~춘향로)

- 인도조성 L=1,000m, 한글테마광장 3개소, 시설물 2, 가로등 및 경관조명 1식

○ 총사업비 : 1,900백만원(도비 500, 시비 1,400)

- 예산 확보액 : 1,350백만원(도비 500, 시비 850)

○ 사업기간 : ‘11년 ~ ’13년

□ 추진상황

○ 민․관․학 협의회 구성 (전주교대, 주민 등)	: ’11.  6.

○ 주민설명회 개최(2회)	: ‘11.  9.

○ 교통안전시설심의위원회 확정(양방⇨일방통행)	: ‘11.  9.

○ 경관소위원회 개최	: ‘11. 11.

○ 기본 및 실시설계용역 완료                       : ’11. 12.

○ 사업 착공(총괄발주 후 차수계약 추진)	: ’12.  5.

○ 무궁화주유소～유산원 주차장간 인도조성(L=700m) 완료  : ’12. 10.

□ 금후계획

○ 한글테마광장 조성 완료	: ’12. 12.

○ 장승로~ 무궁화주유소(L=300m) 사업추진         : ’13.  4.

전주부성 내 골목길(다올길) 디자인 프로젝트

○ 역사 유적지 전주객사와 연계한 역사․문화 인프라 구축

○ 골목길 연결을 통한 구도심 활성화와 주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 사업위치 : 전주시 완산구 고사동 일원

- 걷고싶은거리, 청소년거리, 영화의거리 내 골목길

○ 사 업 비 : 800백만원(특교 400, 도비 120, 시비 280)

○ 사업내용 : 포켓파크 및 휴게공간 조성, 바닥 및 벽면디자인 정비 등

○ 사업기간 : ‘11. 5. ~ ’12. 11.

□ 추진상황

○ 골목구간별 주민협의체 구성	: '11. 11.

○ 기본 및 실시설계 용역 완료	: ‘11. 12.

○ 공사 긴급 발주	: '12.  2.

○ 공사 착공	: ‘12.  3.

○ 민․관협의회 개최	: '12.  3.

○ 사업변경 승인(행안부)에 따른 설계변경	: ‘12.  8.

○ 공사(토목 및 조경) 준공	: ‘12.  9.

○ 추가공사 발주 및 착공	: ‘12. 10.

□ 금후계획

○ 공사 준공	: ‘12. 11.

아중저수지 주변 산책로 조성사업

○ 아중저수지에 수상 산책로를 조성하고 주변환경의 개선을 통하여      시민 및 관광객들에게 친환경적 여가활용 공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 우아동 아중저수지내

○ 사업규모 : 수상 데크산책로 L=815m, 수상파크 2개소, 경관조명 등

- 기완료(2009년) : 산책로 L=287m

- 금  회(2012년) : 산책로 L= 40m, 수상파크 1개소, 경관조명 1식

○ 사 업 비 : 6,500백만원(기시행 1,000, 금회 1,000, 향후 4,500)

※ 향후 부족사업비 4,500백만원 국비 확보에 총력 경주

○ 사업기간 : ‘09년 ~ ’14년

□ 추진상황

○ 수상데크 및 경관조명 설치 완공(L=287m)           : ‘09. 12.

○ 기본 및 실시설계 완료                             : ‘12.  3.

○ 원가심의 및 일상감사(전주시)	: ‘12. 10.

□ 금후계획

○ 공사 발주 및 착공	: ‘12. 11.

○ 공사 준공	: ‘13.  4.

경관이 아름다운 안골사거리 조성사업

○ 안골사거리를 테마와 스토리가 있는 특색있는 상징공간으로 조성

○ 도시미관 향상을 위한 야간경관시설 설치로 밝고 아름다운 도시 구현

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 인후동 안골사거리부근

○ 사업규모 : 특화광장 조성

○ 총사업비 : 500백만원

○ 사업기간 : ‘12. 7. ~ ’12. 12.

□ 추진상황

○ 용역 착수	: ’11. 12.

○ 경관자문(2회)	: ’12.  5.

○ 용역 완료	: ’12.  7.

○ 일상감사(전주시) 및 실시계획인가	: ’12.  9.

○ 공사 발주의뢰 및 착수	: ’12. 10.

□ 금후계획

○ 공사 준공	: ’12. 12.

아름다운 도시공간 연출을 위한 경관개선 사업

매력적인 도시공간 재창조를 위한 노후화된 한옥형 교통제어기 및 한옥마을 주변 노후주거지를 새롭게 리모델링하여 깨끗하고 아름다운 도시 이미지 제고

<노후된 교통신호제어기함 정비 사업>

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 전역 주요 사거리

○ 사업내용 : 노후된 한옥형 교통신호제어기함 리모델링

○ 사업규모 : 97개소(기린대로24, 백제대로23, 전북대주변17, 팔달로16, 충경로8, 온고을로9)

○ 총사업비 : 100백만원

○ 사업기간 : ‘12. 2 ~ ’12. 7

□ 추진상황

○ 기본계획 수립                                    : ‘12.  2.

○ 기본 및 실시설계                                 : ‘12.  3.

○ 사업착수	: ‘12.  4.

○ 사업완료 (97개소)                                 : ‘12.  7.

<한옥마을 주변 경관개선 사업>

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 완산구 노송동 (한옥마을 리베라호텔 맞은편 골목길 주변)

○ 사업내용 : 노후 골목길 환경정비 및 보행 네트워크 연결

○ 사업규모 : 노후 골목길 64개소 정비

○ 총사업비 : 90백만원

○ 사업기간 : ‘12. 7 ~ ‘12. 10

□ 추진상황

○ 사업대상지 선정 및 주민의견 수렴                 : ‘12.  7.

○ 사업착수                                         : ‘12.  8.

○ 사업완료                                         : ‘12. 10.

- 노후 건물 및 담장 벽화조성(40개소), 간판정비(3개소)

- 벤치 설치(2개소), 아트펜스 설치(3개소), 보행안내표지판 설치(16개소)