제297회 전주시의회 임시회

도 시 건 설 위 원 회

2013년도

주요업무계획

아트폴리스담당관

보  고  순  서

□	일 반 현 황	-------	2
□	담 당 별 주 요 기 능	-------	3
□	기 본 현 황	-------	4
□	주요업무 추진계획	-------	5

일  반  현  황

□ 기    구

아트폴리스담당관

아트폴리스

도 시 경 관

공공디자인

도심활성화

□ 정․현원

구 분	총 계	일 반 직					기능	비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	13	1	4	7	1	0	0
현 원	13	1	4	6	2	0	0

담당별 주요기능

담당별	분 장 사 무
아트폴리스	○ 전주 아트폴리스 정책 총괄 ○ 전주시 경관위원회 운영 ○ 기본경관계획 및 야간경관계획 관련 업무 ○ 경관 개선사업 추진
도시경관	○ 옥외광고물 개선 종합계획 수립 ○ 옥외광고물 관리 및 정비에 관한 업무 총괄 ○ 전주시 광고물관리심의위원회 운영 ○ 간판이 아름다운 시범거리조성사업
공공디자인	○ 디자인 자문에 관한 사항 ○ 디자인 가이드라인 제정 및 운영 ○ 공공디자인 개선사업 ○ 디자인 DB구축
도심활성화	○ 도심 활성화 계획 수립 및 사업 시행 ○ 전문특화거리 조성 및 지원에 관한 사항 ○ 경관 광장 조성에 관한 사항

기  본  현  황

□ 각종 위원회 현황

(단위 : 명)

위원회명	설 치 근 거	임 무	계	공무원	시의원	민간위원		운영 횟수
						남	여
경관위원회	경관법 25조	전주시 경관조례 제20조 (경관위원회의 구성 및 운영)	20	1	1	15	3	수시
광고물관리 심의위원회	옥외광고물관리 법시행령제32조	전주시 옥외광고물 등 관리 조례 제20조(위원회의구성)	8	3		3	2	수시
옥외광고정비기금위원회	옥외광고물 등 관리법 제6조의2	전주시 옥외광고정비기금 설치및 운용 조례 제5조(기금운용관리심의)	7	3	1	1	2	수시

□ 광고업 등록 및 옥외광고물 현황

(단위 : 개/개소)

광고업자 등록현황	옥외광고물	시 지 정 광 고 시 설
		계	게시대	벽보판	기 타	비 고
320	36,775	250	150	100	-	‘12.11.1일 전주시설관리 공단으로 재위탁(3년간)

주요업무 추진계획

ꊱ 한국전통문화전당주변 특색거리 조성사업 ꊲ 국립무형유산원앞 특색거리 조성사업 ꊳ 도란도란 시나브로길 조성사업 ꊴ 관광루트 안내판 제작 설치 ꊵ 시 지정현수막 게시대 시설개선 ꊶ 특화거리 유지보수사업 ꊷ 경관개선 시설물 유지 보수 ꊸ 아중저수지주변 산책로 조성사업 ꊹ 경관이 아름다운 안골사거리 조성사업 2013 공공디자인 아카데미 운영 옥외광고물 관리 강화로 도시경관 개선	/ 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16

한국전통문화전당 주변 특색거리 조성

○ 전주한옥마을, 동문거리, 영화의 거리와 한국전통문화전당을 연결하는

관광벨트 구축 및 한스타일의 아름다운 이미지를 테마로 한 특색거리 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 경원동 한국전통문화전당 주변길

○ 규    모 : 특색거리 조성 L=1,200m (한국전통문화전당 주변 도로)

○ 소요예산 : 3,000백만원(국 1,500, 도 900, 시 600)

- 2013년 : 2,000백만원(국 1,000, 도 600, 시 400)

○ 사업내용

- 순환 보행로 연결하여 보행자 중심 도로 조성

- 전통문화 이미지에 맞는 도로 꾸미기 및 경관 보안등 설치

□ 추진계획

○ 기본 및 실시설계 용역 착수                     :  ’13.  1.

○ 특화거리 조성 세부계획 마련 주민협의(2회)       :  ’13.  2.

○ 교통안전시설 심의 및 관련부서 협의             :  ’13.  4.

○ 경관위원회 개최 및 실시설계용역 완료           :  ’13.  7.

○ 원가심사 및 일상감사                           :  ’13.  7.

○ 공사발주 및 착공                               :  ’13.  9.

○ 사업 준공                                      :  ’14. 12.

국립무형유산원 앞 특색거리 조성

○ 전통 한옥마을과 국립무형유산원을 연결하는 관광벨트 구축

○ 한글의 아름다운 시각적 이미지를 테마로 한 특색거리 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 동서학동 서학로

○ 사업규모 : 특색거리 조성 L=1,000m (장승로～교대앞 ~춘향로)

- 인도조성 L=1,000m, 한글테마광장 3개소, 시설물 2, 가로등 및 경관조명 1식

○ 총사업비 : 1,900백만원(도비500, 시비1,400)

- 2013년도 확보액 : 500백만원(시비 500)

○ 사업기간 : ‘11. 11 ~ ’13. 7.

□ 그간 추진상황

○ 민관학협의회 구성 (전주교대, 주민 등)             : ’11. 6.

○ 주민설명회 개최(2회)                             : ‘11. 9.

○ 교통안전시설심의위원회 확정(양방⇨일방통행)      : ‘11. 9.

○ 경관소위원회 개최                                : ‘11. 11.

○ 기본 및 실시설계용역 완료                        : ’11. 12

○ 사업 추진(총괄발주 후 차수계약 추진)	: ’12.  5.

- 무궁화주유소 ~유산원 주차장간 인도조성 (L=700m)완료  : ’12. 10.

- 가로등 설치 완료(남천교~ 유산원 주차장앞)        : ‘12. 10.

- 한글테마광장 조성 완료 (광장 3개소, 산책로2, 조형물2) : ‘12. 12.

□ 금후계획

○ 한글테마 광장 및 경관조명 설치                   : ‘13.  5.

○ 장승로 ~ 무궁화주유소(L=300m) 사업추진          : ’13.  7.

도란도란 시나브로길 조성사업

○ 친환경 녹색 생활공간 조성으로 건강하고 아름다운 휴게공간 창출

○ 한옥마을과 연계한 지역의 관광인프라 확충으로 쇠퇴지역 활성화

□ 사업개요

○ 위    치 : 산성마을~남고산~대성정수장~치명자산~한옥마을

○ 사업규모 : 둘레길 조성 L=7.8km

- 웰빙황토길(552m), 쉼터조성 2개소, 자만벽화(43개소), 산성길 정비 3.0km,

휴게시설 설치(벤치 등 38개소) 등

○ 총사업비 : 1,200백만원(국비 600, 도비 120, 시비 480)

○ 사업기간 : ‘12. 10. ~ ’13. 7.

□ 그간 추진상황

○ 2012년 사업제안서 제출 및 확정                   : ‘11. 12.

○ 기본 및 실시설계 추진                            : ‘12.  4.

○ 국고보조금 교부결정 및 송금통지                  : ‘12.  5.

○ 실시설계용역 완료                               : ‘12.  7.

○ 공사착공 및 추진중(공정 45%)                    : ‘12. 10.

- 황토길 조성완료 L= 552m, 관성묘앞 쉼터 조성 A=400㎡

- 산책로 정비 1식

□ 금후계획

○ 공사 준공                                        : ‘13.  7.

관광루트 안내판 제작 설치

○ 관광객 및 시민에게 전주에 산재되어 있는 관광자원을 체계적으로 소개  ○ 새로운 관광루트 제공으로 아트폴리스 전주에 대한 도시 이미지 제고

□ 사업개요

○ 위    치 : 다중이용시설 주변 지역

○ 사업내용 : 통합안내지도 및 QR코드 개발, 통합 안내판 설치

○ 총사업비 : 80백만원

○ 사업기간 : 2013. 1 ~ 2013. 9

□ 그간 추진상황

○ 천사의 길 조성사업                              : ‘12. 3. ~ 10.

- 스토리텔링 조형물 설치/1개소, 벤치 설치/3개소

- 노후 건물 및 담장 벽화 조성 : 72개소

- 간판 및 파사드 개선/11개소, 보행안내판 설치/16개소, 아트펜스/6개소

□ 금후계획

○ 사업방향 및 대상지 선정                         : ‘13. 1.

○ 관련부서 협의 및 사업계획 확정                  : ‘13. 2.

○ 디자인 및 설계                                  : ‘13. 3.

○ 제작 발주 및 설치                               : ‘13. 4. ~ 8.

시 지정 현수막게시대 시설개선

노후된 시 지정 현수막 게시대를 아름답고 안전하게 시설 개선함으로써

구조적으로 안전성 확보하고 아름다운 도시경관 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2013. 2 ~ 5월

○ 사업대상 : 현수막게시대 150개(상판교체 8개소, 거치대 교체 25개소)

※ 상판교체 완료 87개, 미 교체 63개 / 거치대 교체 완료 20개, 미 교체 130개

○ 사업내용 : 게시대 상판교체 및 지주도색, 현수막 거치대 교체

○ 사 업 비 : 80백만원(상판교체 및 지주도색 30, 거치대 교체 50)

□ 추진계획

① 게시대 상판교체 및 지주도색

○ 사업기간 : 2013. 2 ~ 4월

○ 사업내용 : 상판교체(BI 적용) 및 지주도색(부착방지 도료 사용)

○ 사 업 비 : 30백만원(8개소 × 3,750천원)

○ 추진일정

- 사업대상 게시대 선정(8개)	: ‘13. 2.

- 상판 디자인 선정 및 사업 발주	: ‘13. 3.

- 사업 완료	: ‘13. 4.

② 현수막 거치대 교체

○ 사업기간 : 2013. 2. ~ 5월

○ 사업내용 : 현수막 거치대 교체(탱탱이 형식→반자동형)

○ 사 업 비 : 50백만원(25개소 × 2,000천원)

○ 추진일정

- 사업대상 게시대 선정(25개)	: ‘13. 2.

- 현수막게시대 거치대 교체사업 시행	: ‘13. 3.~5.

특화거리 유지보수 사업

○ 특화거리로 기 조성된 경관조명 및 시설물이 노후, 파손된 시설물

일제 정비 및 지속적인 시설물 유지관리로 도시미관 향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 걷고 싶은거리 외 4개로선

○ 규    모 : 걷고싶은거리외 4개로선 경관조명 시설보수 등 L= 1,760m

○ 소요예산 : 300백만원

○ 사업내용

- 걷고싶은거리 : 루미나리에 LED전기공사 및 구조물도색

- 차이나  거리 : 바닥 정비 및 보수

- 웨딩 거리    : 경관조명 및 시설물 정비

- 전자상가거리 : 조형물 및 분수정비

- 청소년 거리  : 시설물 도색 및 보수 등

□ 추진계획

○ 현지 조사 및 실시설계                             : ‘13.  1.

○ 공사발주 및 착공                                  : ’13.  5.

○ 사업 준공                                         : ’13.  7.

○ 시설물 인계 인수                                  : ’13.  8.

경관개선 시설물 유지 보수

○ 수년간 경관개선을 통해 개선된 공공시설물에 대한 지속적인 유지

관리로 아름답고 매력적인 도시공간 재창출

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 전역

○ 사업규모 : 경관개선 시설물 4,826개소

○ 사업내용 : 아트펜스․교통시설지주․옹벽 등 공공시설물 유지 보수

○ 사 업 비 : 64백만원

○ 사업기간 : 2013. 1 ~ 2013. 9

□ 그간 추진상황

<2009년>

○ 아트펜스 : 20개소 5,070m

<2010년>

○ 유개승강장 도색사업 : 컬러박스형 388개소

○ 담장 및 옹벽 경관개선 : 9개소 1,660m

○ 아트펜스 : 16개소 4,700m  ○ 교통시설 지주도색 : 14개도로 3,001개

<2011년>

○ 나들목(IC) 경관개선 : 2개소  ○ 교량 및 육교 경관개선 : 6개소

○ 교통시설 지주도색 : 10개도로 1,170개  ○ 담장벽화 : 36개소

○ 담장 및 옹벽 경관개선 : 3개소

<2012년>

○ 교통신호제어기함 경관개선 : 97개소

○ 담장벽화 : 72개소  ○ 아트펜스 : 6개소 230m

□ 금후계획

○ 사업대상 선정	: ‘13.  1.

○ 공사 발주 및 착수	: ’13.  3.

○ 공사 준공	: ’13. 12.

아중저수지 주변 산책로 조성사업

○ 아중저수지에 수상 산책로를 조성하고 주변환경의 개선을 통하여      시민 및 관광객들에게 친환경적 여가활용 공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 우아동 아중저수지내

○ 사업규모 : 수상 데크산책로 L=815m, 수상파크1개소, 경관광장1개소,                  생태데크 1개소, 다양한 경관데크 1개소, 경관조명 1식

- 1차분(2009년) : 산책로 L=287m

- 2차분(2013년) : 수상파크 1개소, 산책로 67m, 경관조명1식

○ 사 업 비 : 6,500백만원(1차분 1,000, 2차분 1,000, 잔여분 4,500)

○ 사업기간 : ‘09. ~ ’14.

□ 그간 추진상황

○ 1차구간 수상데크 및 경관조명 설치 완공 (L=287m)  : ‘11. 12.

○ 2차구간 기본 및 실시설계 완료                     : ‘12.  3.

○ 원가심의 및 일상감사                              : ‘12. 11.

○ 공사착공                                          : ‘12. 12.

□ 금후계획

○ 공사 준공(2차구간)                                : ‘13. 7.

경관이 아름다운 안골사거리 조성사업

○ 안골사거리를 테마와 스토리가 있는 특색있는 상징공간으로 조성

○ 도시미관 향상을 위한 야간경관시설 설치로 밝고 아름다운 도시 구현

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 인후동 안골사거리부근

○ 사업규모 : 특화광장 조성

○ 총사업비 : 500백만원

○ 사업기간 : ‘12. 11. ~ ’13. 5.

□ 그간 추진상황

○ 용역추진(경관위원회 자문 및 디자인검토)       : ‘12. 7.

○ 지역 주민설명회(인후2동)                      : ‘12. 7.

○ 원가심사 및 일상감사 의뢰(감사실)             : ‘12. 9.

○ 공사 추진중(30%)                             : ‘12. 11.

- 콘크리트 측구 철거 및 콘크리트 타설(L=350m)

- 은행나무 이식(15주)

- 교통섬 판석포장 기초콘크리트 타설(A=1200㎡)

□ 금후계획

○ 공사 준공                                    : ’13. 5.

2013 공공디자인 아카데미 운영

○ 전주를 밝고 아름답게 만들기 위해 현장 스터디를 통해 공공디자인 사례를

심층 학습하여 타도시와 전주시의 공공디자인 사업의 비교, 분석, 평가

○ 지속적으로 변화하고 새롭게 추진되고 있는 선도적 공공디자인에

대한 교육 및 체험의 기회 확대로 지속가능한 매력적인 도시 건설

□ 운영방침

○ 단순 견학 차원의 교육 지양 → 교육대상자 참여형 교육 운영

- 실무와 연관이 있는 과제 부여 결과물 제출토록 추진

○ 직렬․직급별 업무 연관성 고려 안배 → 실무 적용 효과 향상

□ 운영개요

○ 기    간 : ’13. 4 ~ 5월(2회, 2박3일)

○ 대    상 : 직원 70명 정도(6급이하 공무원, 실무자 중심) / 1회 35명

○ 교육장소 : 구도심활성화 분야 선진 도시

○ 교육방식 : 문화적 감수성과 공공예술이 결합된 지속가능한 아트폴리스

전주 만들기를 위한 현장 스터디 투어와 전문가 특강,

참가자 토론 중심

○ 교육기관 : 전문기관‧단체 위탁

○ 소요예산 : 30백만원

□ 추진계획

○ 위탁교육기관 선정                         : ‘13. 3.14까지

○ 현장탐방 장소 현지 확인 및 협의           : ‘13. 3.25까지

○ 교육대상 선발 및 확정                     : ‘13. 3.29까지

○ 교육 실시                                 : ’13. 4월중

옥외광고물 관리 강화로 도시경관 개선

옥외광고물을 체계적이고 효율적으로 관리함으로써 불법광고물이

없는 깨끗한 도시경관 개선과 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

□ 현  황

(단위: 개, 건)

광고업자 등록현황	옥외광고물	시 지 정 게 시 시 설
		계	게시대	벽보판	비 고
320	36,775	250	150	100	‘11.11.1부터 시설관리공단 위탁관리 운영

□ 그간 추진상황(2012년)

○ 불법광고물 정비실적(1,298,888건), 과태료부과(115건/59백만원)

○ 현수막게시대 및 벽보판 공단 재위탁(3년, ‘12.11.1~’15.10.31)

○ 현수막게시대 위탁관련 광고협회 소송 승소(12건)

○ 전주부성 내 골목길디자인 프로젝트(L=1,050m, 8억, ‘12.11월 준공)

□ 금후계획

【불법광고물 근절】

○ 불법광고물 상시정비 및 취약시기별 중점정비 운영(연중)

- 고질 및 청소년 유해 불법광고물 과태료 부과 및 고발 등 행정처분

○ 옥외광고물 특정구역 관리 및 단속계획 수립․단속(반기별 1회)

○ 공공목적광고물 표시기준 준수 지속 홍보 및 계도․단속(연중)

【지속적인 제도개선】

○ 법령․도 조례 개정에 따른 옥외광고물 등 관리조례 전부개정 추진(상반기)

○ 불법광고물 정비를 위한 옥외광고정비기금 적립운용 이행(목표액 : 96백만원)

○ 재해대비 옥외광고물 안전점검 민간위탁(광고협회) 상시모니터링 강화

○ 시 지정 게시시설 공단 위탁운영 감독 및 관련소송 승소 마무리

【옥외광고시설물 경관사업】

○ 현수막게시대 상판 교체 등 시설개선(8개소/30백만원, 상반기)

○ 현수막게시대 반자동형 거치대 교체 시행(25개소/50백만원, 상반기)