제306회 전주시의회 임시회

도  시  건  설  위  원  회

2014년도

주요업무계획

아트폴리스담당관

보  고  순  서

□	일 반 현 황	-------	2
□	담 당 별 주 요 기 능	-------	3
□	기 본 현 황	-------	4
□	주요업무 추진계획	-------	5

일  반  현  황

□ 기    구

아트폴리스담당관

아트폴리스

도 시 경 관

공공디자인

도심활성화

□ 정․현원

구 분	총 계	일 반 직					기능	비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	13	1	4	7	1	0	0
현 원	13	1	4	6	2	0	0

담당별 주요기능

담당별	분 장 사 무
아트폴리스	○ 전주 아트폴리스 정책 총괄 ○ 전주시 경관위원회 운영 ○ 경관계획 및 경관성 검토 협의업무 ○ 경관 개선사업 추진
도시경관	○ 옥외광고물 개선 종합계획 수립 ○ 옥외광고물 관리 및 정비에 관한 업무 총괄 ○ 전주시 광고물관리 및 디자인 심의위원회 운영 ○ 간판이 아름다운 시범거리조성사업
공공디자인	○ 공공디자인 자문에 관한 사항 ○ 공공디자인 가이드라인 운영 ○ 공공디자인 개선사업 ○ 공공디자인 DB 구축
도심활성화	○ 도심활성화 계획 수립 및 사업 시행 ○ 전문 특화거리 조성 및 지원에 관한 사항 ○ 경관광장 조성에 관한 사항

기  본  현  황

□ 각종 위원회 현황

(단위 : 명)

위원회명	설 치 근 거	임 무	계	공무원	시의원	민간위원		운영 횟수
						남	여
경관위원회	경관법 제25조	전주시 경관조례 제20조 (경관위원회의 구성 및 운영)	20	1	1	15	3	수시
광고물관리 및디자인 심의 위원회	옥외광고물 등 관리법 시행령 제32조	전주시 옥외광고물 등 관리 조례 제20조(위원회의구성)	8	3	-	3	2	수시
옥외광고정비기금운용심의위원회	옥외광고물 등 관리법 제6조의2	전주시 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례 제5조(기금운용관리심의)	7	3	1	2	1	수시

□ 광고업 등록 및 옥외광고물 현황

(단위 : 개/개소)

광고업자 등록현황	옥외광고물	시 지 정 광 고 시 설
		계	게시대	벽보판	기 타	비 고
326	36,978	246	146	100	-	‘12.11.1일 전주시설관리 공단으로 재위탁(3년간)

주요업무 추진계획

□	한국전통문화전당 주변 특색거리 조성	----	6
□	아중저수지주변 산책로 조성	----	7
□	백제대로 경관거리 조성	----	8
□	황방산(서고사)주변 시나브로길 조성	----	9
□	풍남문 로터리 간판개선	----	10
□	시 지정 현수막 게시대 신규설치 및 개선	----	11
□	기린공원 샘터 갈랫길 조성	----	12
□	성장거점지역 특정경관계획 수립	----	13

한국전통문화전당 주변 특색거리 조성

○ 전주한옥마을, 동문문화거리, 영화의 거리와 한국전통문화전당을

연결하는 관광벨트 구축 및 한스타일 아름다운 이미지를 테마로 한

특색거리 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 경원동 한국전통문화전당 주변 길

○ 사업규모 : 특색거리 조성 L=2.2km

○ 총사업비 : 4,500백만원(국 2,250, 도 2,000, 시 250)

- 2013년 : 2,300백만원(국 1,300, 도 1,000)

- 2014년  : 1,900백만원(국 900, 도 830, 시 170)

- 2015년 :    300백만원(국 50, 도 170, 시 80)

○ 사업기간 : ’13. 01. ∼ ’15. 12.

□ 추진상황

○ 용역과제 심의	: ’13. 02.

○ 지방재정 투융자심사	: ’13. 03.

○ 기본(디자인) 설계 용역 완료	: ’13. 05.

○ 주민설명회 개최(2회)	: ’13. 05.∼ 06.

○ 교통안전시설심의위원회 확정(양방→일방)	: ’13. 07.

- 노선 : 한국전통문화전당 후문(동문1길)

○ 실시설계 용역(조형물 및 특화거리 조성) 완료	: ’13. 10.

○ 1차분 공사 착수                                 :  ’13. 12.

□ 문제점 및 대책

○ 도로 폭이 좁아 인도와 차도 높이 분리에 어려움 예상(주정차 문제)

⇨ 노선별 상인회와 협의 후 가능 노선부터 사업 시행

□ 금후계획

○ 2차분 공사 착수	: ’14. 04.

아중저수지주변 산책로 조성

○ 아중저수지에 수상 산책로를 조성하고 주변 환경 개선을 통하여

시민 및 관광객들에게 친환경적 여가활용 공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 우아동 아중저수지 내

○ 사업규모 : 수상데크 산책로 L=815m, 수상광장 1개소, 경관광장 1개소,

생태데크 1개소, 경관데크 1개소, 경관조명 1식

- 1차분(2009년) : 산책로 L=287m

- 2차분(2013년) : 수상광장 1개소, 산책로 L=67m, 경관조명 1식

- 3차분(2014년) : 산책로 L=420m, 경관조명 1식

○ 총사업비 : 6,500백만원(1차분 1000, 2차분 1000, 3차분 2000, 잔여분 2500)

○ 사업기간 : ’09. ∼ ’15.

□ 추진상황

○ 1차구간 준공(L=287m)	: ’11. 12.

○ 2차구간 기본 및 실시설계 완료              : ’12. 03.

○ 원가심의 및 일상감사                       : ’12. 11.

○ 2차구간 준공	: ’13. 08.

- 수상광장 1개소, 산책로 67m, 경관조명 1식

□ 문제점 및 대책

○ 산책로를 도로에 인접 조성 시 사유토지 편입

⇨ 사유토지 매입에 어려움이 있으므로 산책로를 사유지에 인접해 사업 추진

□ 금후계획

○ 3차구간 실시설계서 검토	: ’14. 02.

○ 3차구간 공사 착공	: ’14. 03.

○ 3차구간 공사 완료	: ’14. 12.

백제대로 경관거리 조성

○ 전주 관문인 전주역 중심 백제대로 주변의 어둡고 침체되어 있는

거리를 밝고 활력 있는 경관거리로 조성하여 도시이미지 향상 및

역세권 활성화 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 우아동 전주역광장 ∼ 명주골 사거리

○ 사업내용 : 인도 정비, 경관조명 설치, 상징조형물 설치, 쌈지공원

○ 사업규모 : 경관거리 조성 L=750m, B=20m

○ 사 업 비 : 1,800백만원(2014년 - 1,000백만원)

○ 사업기간 : ’14. ∼ ’15.

□ 문제점 및 대책

○ 총사업비가 1,800백만원 정도 소요되나 1,000백만원 일부 확보로

일시완공이 불가

⇨ 경제성과 사업효과 등을 종합적 검토 후 사업효과가 있는 구간부터 우선 사업 추진

□ 금후계획

○ 백제대로 경관거리 조성계획 수립	: ’14. 02.

○ 용역 발주 및 착수	: ’14. 03.

○ 전주시 경관위원회 사전 자문 및 검토	: ’14. 05.

○ 경관거리 조성공사 시행	: ’14. 06.∼’15. 12.

황방산(서고사)주변 시나브로길 조성

○ 전북 혁신도시 본격적인 입주와 만성동 법조타운 개발로 황방산

일대가 도심 속으로 들어옴에 따라 누구나 쉽게 찾고 거닐 수 있는

친근한 자연 문화 공간 창출

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 황방산공원 진입로(서고사 주변)외 2개소

○ 사업내용 : 정여립로(구도로)∼황방산공원과 연계한 시나브로길 조성

○ 사업규모 : 진입로 정비 L=500m, 안내간판 및 파고라 설치 등

○ 사 업 비 : 100백만원

○ 사업기간 : ’14. 02. ∼ 12.

□ 문제점 및 대책

○ 시설물 설치시 산책로(서고사 진입로)가 사유지 내에 있어 토지주 협의 필요

※ 토지주와 협의가 불가능할 경우 국·공유지 위주로 시설물 설치

□ 금후계획

○ 세부사업계획 수립	: ’14.  02.

○ 실시설계	: ’14. 02.

○ 사업 착수	: ’14. 03.

○ 사업 준공	: ’14. 12.

풍남문 로터리 간판개선

○ 풍남문 주변 영세상가의 난립된 간판과 노후된 건물입면을 주변 보전권역

경관과 어울리게 개선하여 구도심 활성화 및 전통문화 정체성 확립 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 풍남문 로터리 주변(완산구 풍남문3길)

○ 사업대상 : 로터리 주변 상가 60여 개소

○ 사 업 비 : 452백만원[국비205, 시비205, 주민자부담(10%)42]

○ 사업기간 : ’14. 01. ∼ 08.

□ 세부 사업내용

○ 불법 및 노후간판 정비(131개) 및 신규 간판 설치(80여개 정도)

○ 건물 노후에 따른 건물벽면(파사드) 개선(상가 60여 개소)

□ 추진상황

○ 사업 필요성 및 제안 설명(중앙부처 방문)	: ’13. 02.

○ 사업 추진을 위한 주민협의체 구성	: ’13. 07.

○ 주민설명회(2회) 및 사업추진 주민동의서 징구	: ’13. 06. / 12.

○ 공모사업 선정	: ’13. 12.

□ 금후계획

○ 세부사업 구역 획정 및 광고물 설치기준 마련	: ‘14. 01.∼02.

○ 1차분 사업 발주(국비 확보액)	: ’14. 03.

○ 제1회 추경예산 매칭 시비 확보(205백만원)	: ’14. 06.

○ 2차분 사업 발주(시비 확보액)	: ’14. 06.

○ 사업 완료	:  ’14. 08.

시 지정 현수막게시대 신규설치 및 개선

○ 현수막 게시 수요가 있는 지역에 시설을 확충하여 불법행위를      사전에 차단하고, 노후 게시대를 안전하게 시설 개선함으로써 구조적

으로 안전성을 확보하고 아름다운 도시경관 조성

□ 사업개요

○ 사업대상 : 19개(신규설치 4개, 거치대 교체 15개)

○ 사업내용 : 신흥지역 신규설치, 거치대 교체(스프링⇨반자동형)

○ 사 업 비 : 60백만원(신규설치 30, 거치대교체 30)

○ 사업기간 : ’14. 01. ∼ 04.

□ 추진계획

① 게시대 신규설치

○ 사업내용 : 신흥 개발지역 등에 신규설치

○ 사 업 비 : 30백만원(4개소 × 7,500천원)

○ 추진일정

- 신설지역 조사 및 선정(4개소)	: ’14. 01.

※ 혁신도시 내 현수막 수요지역 선정

- 사업 시행(전주시)	: ’14. 02.∼03.

② 현수막 거치대 교체

○ 사업내용 : 현수막 거치대 교체(스프링방식→반자동형)

○ 사 업 비 : 30백만원(15개소 × 2,000천원)

○ 추진일정

- 사업대상 게시대 선정(15개)	: ’14. 02.

※ 사용빈도가 높고 파손정도가 심한 게시대 우선대상 선정

- 사업 시행(시설관리공단)	: ’14. 03.∼04.

기린공원 샘터 갈랫길 조성

○ 한옥마을에서 이어지는 자만마을, 낙수정마을, 기린공원, 아중저수지를

연결하는 둘레길을 조성하여 한옥마을을 찾는 관광객 및 시민을 위해     분리된 거점공간의 유기적 연계를 통한 새로운 관광루트 개발 및 생활     밀착형 휴식 공간 확대

□ 사업개요

○ 위    치 : 기린공원 약수터에서 아중저수지 주변 중심

- 둘레길 코스 : 한옥마을∼자만마을∼옥류마을∼낙수정마을∼군경묘지

∼기린공원(동고산성 북문터∼약수터)∼아중저수지 산책로

○ 사업내용 : 기린공원 샘터 갈랫길 경관개선

- 휴식공간 조성, 노후 안내판 정비, 약수터 편의시설 정비 및 꽃길조성

○ 총사업비 : 100백만원

○ 사업기간 : ’14. 02. ∼ 10.

□ 추진상황

○ 낙수정마을 커뮤니티공간 조성	: ’13. 03.∼06.

- 노후담장 및 벽면 아트도색(260m), 아트펜스 설치(130m)

- 파고라 및 데크설치(2개소), 나대지 화단조성(45m), 야간조명 설치(2개소)

○ 옥류마을 사잇길 조성	: ’13. 07.∼11.

- 전망대 및 포토존 : 휴식공간 1식, 데크·벤치·안전펜스, 현판·가로등 설치

- 군경묘지 앞 쉼터 조성 : 파고라 2식, 데크·벤치·안전펜스 설치

- 옥류마을 둘레길 조성 : 쉼터조성 2개소, 보안등설치 5개, 포인트우편함·안내판 설치

- 교동아파트 커뮤니티공간 조성 : 파고라 2식

□ 금후계획

○ 노후환경 현황조사	: ’14. 02.

○ 세부계획 수립	: ’14. 02.

○ 용역시행	: ’14. 03.∼04.

○ 공사시행	: ’14.  05.∼10.

성장거점지역 특정경관계획 수립

○ 대표 관광지인 한옥마을 외 지역을 중심으로 성장 잠재력이 높고

사업효과를 주변지역까지 확산시킬 수 있는 성장거점지역을 선정,

○ 새로운 경관구조를 만들기 위한 타당성을 검토하고 기본전략 및

밑그림(디자인)을 제시하는 특정경관계획으로 새롭고 창의적인

아트폴리스 도시 경관구조 실현

□ 추진방향

○ 전주시 진입부의 도시 이미지 재정립을 위한 가로환경 개선

- 전주 방문객들에게 우리 시에 대한 인상적인 이미지 제공

○ 지역 주민 삶의 질 향상을 위한 경관 개선

- 권역별 지역 환경 및 자원을 활용한 시민 휴식 공간 조성

○ 기존 구도심 지역 중 그동안 소외된 지역의 경관 개선

- 쾌적하고 수준 높은 가로환경으로 도시 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 사업위치 : 전주시 전역

○ 사업내용 : 경관구조 설정, 타당성검토 및 기본(디자인)계획 등

○ 사 업 비 : 169백만원

○ 사업기간 : ’14. 02. ～ ’15. 04.

□ 추진계획

○ 용역과제 심의	: ’14. 02.

○ 경관위원회 사전 자문 및 검토	: ’14. 03.

○ 용역 발주 및 착수	: ’14. 05.