제306회 전주시의회 임시회

복  지  환  경  위  원  회

2014년도

주요업무계획

맑은물사업소

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진계획		-------	5
	○	수 도 행 정 과	-------	5
	○	급 수 과	-------	8
	○	수 질 관 리 과	-------	17
	○	하 수 과	-------	21

일   반   현   황

□ 기   구 : 4과 14담당

									맑은물사업소
	수도행정과 (4담당)							급 수 과 (4담당)							수질관리과 (3담당)								하수과 (3담당)
	수도행정							맑은물공급							수질관리								하수행정
	완산요금							급수시설							수질분석								하수시설
	덕진요금							누수방지							생산관리								하수정비
	체납징수							계량기관리

※ 누수신고센터, 계량기시험소, 서신통합센터, 사업장 15개소(취수장 1, 배수지10, 정수장1, 가압장 3)

□ 정‧현원

부 서 직 급	정 원	현 원
		계	수도행정과	급 수 과	수질관리과	하 수 과
합 계	92	91	22	24	32	13
소 계	88	87	22	24	28	13
4급	1	1	1
5급	4	4	1	1	1	1
6급	18	18	7	5	3	3
7급	34	44	11	11	17	5
8급	16	18	2	6	6	4
9급	15	2		1	1
연 구 사	4	4			4

※ 청경 7명, 공무직 26명 별도

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
수도행정과	○ 맑은물사업소 운영 총괄 ○ 상수도공기업특별회계 운영 ○ 공사 및 용역계약, 물품관리 ○ 상하수도사용료 과징업무 전반 ○ 상수도요금 인상 및 조례 개정 ○ 검침업무 관리 ○ 상하수도 급수전 관리 및 수도 단속
급 수 과	○ 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 ○ 상수도 중장기계획 수립․시행 ○ 비상급수계획 및 대책수립 총괄 ○ 급수공사, 상수도 증설 및 확장공사 ○ 간이상수도 유지관리업무 ○ 누수탐사 및 누수복구업무, 누수방지대책 수립 ○ 누수신고센터 운영관리 ○ 급수중지․개전․폐전에 따른 계량기 관리 ○ 고장․노후계량기 교체관리 ○ 계량기시험소 운영관리
수질관리과	○ 생활용수 공급 및 공업용수 생산․공급 ○ 광역상수도 수요에 따른 수급조절 및 관리 ○ 각 사업장 구축물․건물 유지보수 및 안전관리 ○ 국가공인수질검사기관 적정운영 및 정도관리 ○ 먹는물 공동시설(약수터) 및 간이상수도 수질검사 ○ 상수도 원․정수 수질관리 및 보전 ○ 상수원보호구역 관리
하 수 과	○ 하수도정비 기본계획 수립 ○ 하수도공기업 특별회계 운영 ○ 효율적인 지하수 및 물 재이용 관리 ○ 하수관거 정비사업 ○ 하수관거정비 민간투자(BTL)사업 유지관리 ○ 마을하수도 시설 및 유지관리 ○ 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리 ○ 하수찌꺼기(슬러지) 처리시설사업 ○ 총인(T-P) 처리시설사업 ○ 새만금유역 CSOs 및 초기우수 처리시설사업

기   본   현   황

□ 급수현황

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유수율 (%)	급수량(천㎥/일)
						계	생활 용수	공업 용수
655,358	652,737	99.6	365	219,332	70.0	277	241	36

□ 도․송․배․급수관

(단위 : ㎞)

총 연 장	도․송수관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,551	64	879	1608

□ 상수원 보호구역

구 분	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎡)	상류(m)	하류(m)		안내판	표주
계	614,111	1,500	800		16	50
방수리	284,775	1,000	500	‘72. 5. 5.	8	26
전 미	329,336	500	300	‘67. 8. 5.	8	24

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

□ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)	비고
계		108.8	1,861	1,725	136	93
합 류 식			568	568	0	100
분류식	소 계	108.8	1,293	1,157	136	89
	오수관거		766	682	84
	우수관거		527	475	52

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계	88.9	1,010	251	73	5
전주천 (좌, 우안)	23.5	369	142	37	4
삼 천 (좌, 우안)	15.4	155	45	18
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	38	9
아 중 선	12.0	174	16	4
팔복선(공장,생활)	16.9	183	8	5	1
상 관 선	10.4	47	2
기 타 (구화천,태평로,연화천, 덕적천,중복천)	6.3

※ 계획차집관로(5개라인) : 12.5km

□ 하수․위생처리 시설

구 분	하 수 처 리 장	위 생 처 리 장
위 치	전주시 덕진구 고내천변로 58
면 적	316,000㎡	4,990㎡
시설규모	규 모 : 403,000㎥/일 - 1단계 : 113,000㎥ (`90) - 2단계 : 190,000㎥ (`97) - 3단계 : 100,000㎥ (`05)	규 모 : 290㎘/일
처리방법	1․2단계 고도처리(CNR)공법 - 섬모상생물막을 이용한 처리 3단계 고도처리(CSBR) 공법 - 생물반응조 일괄(침전지 불필요)처리	침사협잡물 제거(1차)후 하수 연계처리(`94년부터 시행) 위생처리장 준공 : `02. 3

수도행정과  소 관

□	민원없는 상하수도요금 부과 관리	----	6
□	체납 상하수도사용료 징수율 제고	----	7

민원없는 상하수도요금 부과 관리

요금부과에 따른 현장행정을 강화하여 검침에서 부과까지 누수없는 관리로 민원 발생을 최소화하는 상하수도 요금 부과체계 확립

□ 부과현황

(단위 : 백만원)

업종별	2012년			2013년
구분	합계	상수도	하수도	합계	상수도	하수도
계	104,096	72,812	31,284	106,429	74,293	32,136
가 정 용	51,990	41,837	10,153	52,721	42,410	10,311
일 반 용	39,978	25,993	13,985	41,725	27,068	14,657
대중탕용	1,509	935	574	1,470	893	577
공 업 용	10,619	4,047	6,572	10,513	3,922	6,591

□ 추진계획

○ 요금관련 직원․검침원 직무교육 연찬 강화(매월 1회)

○ 수용가 자료정비 : 주소, 성명, 연락처 등 과세대상의 적법성 확보

○ 다량급수업소 일제점검 실시(연 4회)

- 대    상 : 일반용 300㎥이상, 대중탕용 1,500㎥이상에 대해

연초 대상선정 후 분기별 누적관리

- 점검내용 : 계량기 지침확인 및 계량기 관리상태, 지하수 사용상태 등

○ 상수도 업종적용 일제조사(연 2회) : 신규 또는 변경가구

○ 부정급수 일제단속 실시(연 4회)

- 대    상 : 택지개발지구 등 건축공사장, 휴면수용가 등 부정급수 우려대상

- 점검내용 : 무단급수시설장치, 계량기 앞 분기관 설치, 무단개전 사용,

계량기 역진방향 설치, 봉인탈락 무단취부 사용 등

- 결과조치 : 과태료 부과, 요금추징 등 조치

○ 상하수도요금 누수감면, 과오납 민원처리 일원화 지속 시행

체납 상하수도사용료 징수율 제고

체납된 상·하수도요금의 징수를 위해 특별징수기간 운영 및 납부독려, 재산압류 등 강력한 체납처분 시행으로 징수율제고를 통한 재원확충

□ 징수현황

(2013.12.31 현재/ 단위 : 백만원)

구 분		조정액	징수액	결손액	체납액	징수율	비고
합 계		102,439	98,425	711	3,303	96.08%
상수도	계	68,943	66,213	471	2,259	96.04%
	현년도	66,064	64,102	14	1,948	97.03%
	과년도	2,879	2,111	457	311	73.32%
하수도	계	33,496	32,212	240	1,044	96.17%
	현년도	32,196	31,338	10	848	97.34%
	과년도	1,300	874	230	196	67.23%

□ 추진계획

○ 체납단수반 확대운영으로 징수율 제고 : 2개반 → 4개반

- 체납단수반 확대운영 : 2반 4명 ⇒ 4반 8명(3~11월)

○ 체납요금 특별징수기간 운영 : 2회 8개월(‘14.3~6월,9~12월)

- 체납자정보 D/B구축자료 정비를 통한 징수기간 운영

○ 장기고액 체납자에 대한 단수, 체납처분 등 행정조치 강화

- 단수전 계고장 교부 및 부동산 압류․공매처분 등 체납처분 추진

○ 당월분 납기내 납부 및 체납요금 조기납부 홍보활동

- 대용량 사업체, 공동주택 등 조기납부 홍보로 안정적 세입확보

급 수 과  소 관

□	상수도 전면개량을 통한 맑은물공급사업	----	9
□	팔복배수지 건설 및 혁신도시 상수도 공급사업	----	10
□	상수도 배수관 포설사업	----	11
□	학교 등 맑은 수돗물 공급사업	----	12
□	긴급 누수복구 및 누수탐사	----	13
□	노후관 교체․갱생 및 통합공사	----	14
□	저소득층 옥내급수관 개량 지원사업	----	15
□	완벽하고 신속한 상수도 계량기 관리	----	16

상수도 전면개량을 통한『맑은물공급사업』

유수율 제고를 통한 상수도 경영의 효율화 도모 및 노후관 교체 등 급수체계 개선으로 시민들에게 깨끗하고 풍부한 수돗물 안정적 공급

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’09년 3월 ～ ’16년 12월

○ 총사업비 : 161,200백만원(특별회계 72,100, 일반회계 40,000, 지방채 49,100)

※ ’14년 예산 16,900백만원(특별회계 13,900, 일반회계 3,000)

○ 사업규모

- 블록시스템 구축 : 128개(전면개량 50, 블록고립 78)

- 통합관리센터 신축 및 선진 관망관리시스템 구축 1식

- 상수도관 개량 703km, 노후계량기 교체 40,201전

	추진상황(‘13년까지 공정 67%)
○ 블록시스템 : 92개소 추진중(정비 블록 40, 블록 고립 52) ○ 통합관리센터 신축완료, 선진 관망관리시스템 구축 추진중 ○ 상수도관 개량 : 470㎞ ※ 유수율 제고 : 61.3%(‘08) → 70.0%(’13)로 8.7% 증가

□ 추진계획

○ ’14년 목표공정 : 81%

- 노후관로 교체공사 95km

- 간접배수 및 수계 전환(10개 배수지 활용)으로 적정 수압 유지

- 블록정보화시스템 구축 : 수압, 유량, 수질측정 등 배수지 감시․제어

- 전면개량블록 집중투자를 통한 유수율 제고 및 균등수압 확보

○ 공사 마무리	’15. 11월

○ 성과보증 및 준공(전면개량 50개 블록 유수율 85%)	’15. 12월 ～ ’16. 12월

팔복배수지 건설 및 혁신도시 상수도 공급사업

○ 기존 광역송수관 직접 공급지역을 배수지를 통한 간접 공급방식으로 전환

○ 혁신도시, 법조타운, 유통단지, 첨단산업단지 등에 안정적 용수 공급

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 팔복동․만성동 일원

○ 사 업 비 : 26,300백만원(국비 9,300, 시비 17,000)

○ 사업규모

- 배 수 지 : 34,500㎥(생활용수 30,000, 공업용수 4,500)

- 송․배수관 매설 : L= 11.3㎞(송수관 4.7, 배수관 6.6)

○ 사업기간 : ’09. 6월 ～ ’14. 5월

	추 진 상 황
○ 팔복배수지 건설 : 공정 100% - 송･배수관매설 완료(L=4.0㎞), 배수지 구조물 구축 완료 ○ 혁신도시 배수관 포설 : 공정 70% - 송･배수관매설(L=7.3㎞중 2.5㎞완료), 대로1-16호선 제외 매설완료

□ 추진계획

○ 혁신도시 배수관 포설완료	’14. 5월

○ 팔복배수지를 통한 혁신도시 통수 개시	’14. 6월부터

상수도 배수관 포설사업

지하수 등 간이상수도를 이용하는 미급수 취락지역 및 관말처리 된  배수관의 수압저하, 물량부족 지역에 배수관을 포설하여 맑은물을  공급하여 시민 위생환경 개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내

○ 사 업 비 : 500백만원

○ 사업규모 : 관로매설 D=100 ～ 150mm, L=2,350m

○ 사업기간 : ’14. 3월 ～ ’14. 11월

□ 추진계획

○ 사업대상지 측량 및 설계	’14. 2월

○ 공사 착공 및 준공	’14. 3월 ～ 11월

《사업위치》

위 치	규 모		사업비 (백만원)	사 유
4개소	D=100～150mm L= 2,350m		500
덕진구 화전동 오신2길 부근	D=100㎜	L=450m	50	관말해소를 통한 수질개선
완산구 효자동 유연로 부근	D=150㎜	L=920m	230	신규 배수관로 포설로 상수도 공급
덕진구 반월동 반월로 부근	D=150㎜	L=470m	118	신규 배수관로 포설로 상수도 공급
덕진구 인후동 전라초등학교 부근	D=100㎜	L=510m	102	관말해소를 통한 수질개선

학교 등 맑은 수돗물 공급사업

노후된 옥내 급수관의 세척·갱생 또는 교체에 필요한 비용의 일부를  지원하여 맑고 깨끗한 물을 공급하므로서 시민 건강증진에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : ’10년 ∼ ’14년(5개년)

○ 사 업 비 : 800백만원(’14년 50백만원)

○ 지원대상 : 학교, 공동주택, 사회복지시설, 수급자 주택 등

- 배관의 내부가 부식되어 수질기준을 초과하는 경우

○ 지원근거 : 전주시 상수도 급수조례 제39조(급수설비의 관리 책임 등)

○ 지원범위

지원대상	지원범위	지원금액	비 고
학교 및 복지시설	총 공사비 70%이하	최대 20백만원
공동주택	총 공사비 50%이하	최대 30백만원	100세대미만 10백만원 200세대미만 20백만원 200세대이상 30백만원
일반주택	총 공사비 50%이하	최대 30만원
기초수급자	전액	최대 2백만원

	추 진 상 황
○ ’10년 급수설비 지원사업 : 인후현대아파트 등 7개소, 118백만원 ○ ’11년 급수설비 지원사업 : 평화주공2단지 등 6개소, 104백만원 ○ ’12년 급수설비 지원사업 : 평화현대아파트 등 11개소, 249백만원 ○ ’13년 급수설비 지원사업 : 성결아파트 등 7개소, 128백만원

□ 추진계획

○ 급수설비 지원사업 세부계획 수립 및 신청접수	’14. 2월

○ 급수설비 지원 심의회 개최 및 지원대상자 선정	’14. 3월

○ 급수설비 지원사업 공사시행(자체) 및 지원금 지급	’14. 4∼6월

긴급 누수복구 및 누수탐사

상수도 관로에서 발생하는 돌발적 누수를 효율적으로 긴급 복구   함으로써 누수로 인한 예산낭비 방지 및 시민불편을 해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 일원

○ 사 업 비 : 540백만원(긴급누수복구 500, 누수탐사 40)

○ 사업기간 : ’14. 2월 ∼ ’14. 12월

○ 추진방법

- 누수민원 : 단가업체 및 자체 처리

- 누수탐사 : 용역탐사 및 자체탐사

	추진상황(‘13)
○ 누수민원 처리 : 3,200건 - 단가업체 처리 : 도로누수 등 200건 / 470백만원 - 자체처리 : 앵글밸브 교체 등 3,000건 ○ 누수탐사 추진 : 72건(자체탐사 29건, 용역탐사 43건)

□ 추진계획

○ 긴급 누수복구 및 누수탐사 추진	’14. 2~12월

- 누수민원 처리 : 단가업체 처리 및 자체처리(누수 수리원 11명)

- 누수탐사 추진 : 용역탐사 및 자체탐사(주·야간)

· 주간탐사 : 수시탐사 및 의심구간 정밀탐사

· 야간탐사 : 1회/2주 시행

노후관 교체·갱생 및 통합공사

○ 노후로 누수 및 적수가 발생되는 관로를 교체 및 갱생하여 유수율 향상

○ 급수 다발관 통합정비로 안정적인 급수체계 구축 및 관망 효율도모

□ 사업개요

○ 기    간 : ’14. 4월 ∼ 11월

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천1길 등 3개소

○ 사 업 비 : 358백만원(교체 200, 갱생 100, 통합 58)

○ 사업내역

구 분	교 체(1건)	갱 생(1건)	통 합(1건)	비고
위 치	덕진구 송천동 (송천1길)	완산구 효자동 (우전2길)	덕진구 우아동 (우아4길,6길)
사업규모	L=900m (D=200mm)	L=900m (D=200mm)	L=150m (D=50mm)
매설년도	1983년 매설 CI 주철	1986년 매설 CI 주철	급수선 정비 순환망 구축
사 업 비	200백만원	100백만원	58백만원

□ 추진계획

○ 공사추진 및 완료	‘14. 4월 ~ 11월

- 노후관 교체 및 갱생, 통합공사 추진으로 유수율 향상 및 효율적 공급

저소득층 옥내급수관 개량 지원사업

저소득층을 대상으로 노후되어 부식된 옥내 급수관의 교체작업 지원으로 복지환경 개선 및 맑고 깨끗한 물을 공급

□ 사업개요

○ 지원대상

- 옥내급수설비 중 냉·온수관으로 사용중인 아연도 강관 교체 및 갱생 하고자 하는 건물(납,구리,아연 일반검사시 기준초과하는 경우 아연도강관 이외의 관도 갱생대상)

- 「국민기초생활보장법」에 의한 기초생활수급자의 자가주택

- 「사회복지사업법」에 의한 사회복지시설 중 노인복지시설 및 아동복지시설

- 차상위계층 자가주택

○ 사업규모 : 50세대 정도 지원

○ 총사업비 : 110백만원(국비 55, 시비 55) ※ 세대당 2,200천원 정도 지원

○ 사업기간 : ’14. 2월 ∼ ’14. 12월

○ 추진근거 : 「옥내급수관개량지원 업무처리지침」 및 「수도법」제21조, 「전주시상수도 급수조례」제39조

□ 추진계획

○ 세부계획 수립 및 지원신청 홍보	’14. 2월

○ 지원신청 접수 및 선정	’14. 2월

○ 선정가구 현장조사	’14. 2 ∼ 3월

○ 개량공사 추진	’14. 4 ∼ 12월

완벽하고 신속한 상수도 계량기 관리

유효만기․고장 계량기의 완벽한 교체를 통해 계량의 품질 향상을 도모하고  계량기 고장 및 동파의 사전 예방 조치 강화로 계량기 신뢰성 향상

□ 사업개요

○ 기    간 : ’14. 1 ~ 12월

○ 사 업 비 : 1,010백만원

○ 사업규모 : 계량기 교체 22,000개(총 수도전 211,000전의 10.4%)

□ 추진계획

○ 유효만기 계량기 교체 : 20,000개(50㎜이하 19,920, 75㎜이상 80)

○ 고장 및 동파계량기 교체 : 2,000개

- 직접교체 10,000개,  상수도 대행업체 교체 12,000개

※ 긴급복구반 연중(무휴) 운영(공휴일 2개반 3명근무)

* 유효기간 : 50㎜이하 8년, 75㎜이상 6년

○ 불량 Zero화를 위한 계량기 성능검사	’14. 2 ~ 12월

- 대    상 : 신규, 노후, 민원계량기 성능검사 실시(연간 약7,000개)

- 추진방법 : 계량기 성능시험을 통해 불량계량기 색출 및 우수한

계량기 설치

○ 계량기 변동사항 전산입력	30,000건 정도

- 신설, 교체, 시험, 폐전, 개전 등 변동사항 입력

○ 계량기 동파방지 홍보 및 관리	’14. 12월

수질관리과 소관

□	광역상수도 전면 공급에 따른 수질관리 강화	----	18
□	공인 검사기관의 먹는 물 관리 강화	----	19
□	공업용수 도수관 확장교체 사업	----	20

광역상수도 전면 공급에 따른 수질관리 강화

○ 광역상수도 수질의 감시․대응․수습시스템 확립을 통한 안전성 강화    - 광역화 시설 확충운영(신설, 재가동)에 따른 효율적 관리․운영 도모

□ 수도시설 현황

○ 사 업 장 : 총 16개소 (기존 6, 신설 6, 재가동 4)

- 배수지(10)‣인후, 천마, 효자, 대성, 지곡, 팔복, 서신, 화산, 금암, 송천

- 서신통합센터 및 가압장 3개소(삼천, 원당, 팔복)

- 공업용수(2) ‣ 팔복정수장, 전미취수장

□ 추진계획

○ 전주권 광역상수도 공급단계별 감시․대응체계 강화

원 수 (용담호)	⇨	정 수 (고산정수장)	⇨	배수지 (10개소)	⇨	수 용 가
월 1회 이상 현지조사․대응		월 1회 이상 수질상태 확인		매일 법정검사 및 기본항목 자동측정		월 150개소 수질검사

- 전 배수지 실시간 자동 측정 및 검사기관의 수질 통합관리시스템 운영      - 상수도 위기대응, 신속한 민원처리 등 수자원공사와 협력체계 구축

※용담호 수질악화(녹조, 전도, 망간검출 등) 감지․처리대책 중점 추진

○ 용담호 상수원보호구역 지정 여론 대응계획 수립, 추진

- 지역정서 및 환경부, 도, 환경단체 등 유관기관 동향에 능동적 대응

- 상류수계 오염추세 및 자체 수질 분석 등을 통한 합리적 논리 정립

○ 광역배수지 권역별 수압, 수량 등 공급과정 전반에 대한 효율적 제어

- 서신통합센터의 전 배수지 통합제어시스템을 활용, 적정 공급체계 운영

공인 검사기관의 먹는물 관리 강화

먹는 물 수질관리 행정서비스를 확대, 특히 안전성 취약이 우려되는

사회계층, 시설에 대한 수질분석 및 부적절한 음용사례 개선 확대

□ 국가 공인 검사기관

○ 위    치 : 전주시 완산구 내원당길 58-39(대성동 소재)

○ 지정내용 : 2000. 7월 국립환경과학원 승인(제33호)

○ 검사범위 : 먹는물(수돗물 등), 상수원수, 먹는샘물, 각종 지하수

□ 추진계획

○ 시민 먹는 물 안전성 진단 및 수질 민원 분석․개선 역점 추진

- 교육기관 및 다수인 이용 음용수 수질조사 확대, 지속적 추진

▶ 특수․고등(33), 청소년․노인시설(14) 및 약수, 공원내 음수대 등

※ 민선 4, 5기 지하수, 영유아․복지시설, 학교  등 무료 수질검사 : 총 4,500개소

○ 먹는 물 관련 법규 강화 대응 및 음용수 전문 연구기관으로 도약

- 수도사업자(공급) 법정 검사․관리의무 이행 및 신속․정확한 수질 민원처리

○ 검사수수료 세입 제고 및 각종 평가에 우수한 성적 성취 노력

※ 2013 국립환경과학원 전국 검사기관 분석능력 평가 “만점기관” 선정

공업용수 도수관 확장교체 사업

혁신도시·친환경복합단지·노후산단 재생 등 공업용수 수요증가에 대비

하여 노후 도수관로 확장 교체사업을 시행, 안정적 공급체계 구축

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2013. 11. ∼ 2015. 12.

○ 사 업 명 : 공업용수 도수관 확장교체사업

○ 사 업 량 : L=2.53km / 도수관 교체(D600mm→D800mm 확장)

○ 총사업비 : 2,413백만원(도급 1,161 관급 1,201 폐기물 51)

	추 진 상 황
○ 1차분 착공 및 준공완료(516백만원) : 2013. 11.∼ 2013. 12. 27 - 도수관확장교체(L=617m) 및 공기변 2개소, 이토변1개소 설치 - 콘크리트포장 A=2,173㎡ / 아스콘포장 A=1,599㎡

□ 추진계획

○ 2차분 착공 및 준공 (1700백만원 / L=1,560m)  :  ’14. 2. ∼ ’14. 12.

○ ’15년도 3차분 사업비 추경확보 사업조기완료 추진 검토 : 197백만원

※ 혁신도시 내 농촌진흥청에서 ’14. 6월부터 순차적으로 8,600㎥/일 공급요청중임

하 수 과  소 관

□	중장기 하수도 재무관리계획 수립 용역	----	22
□	물 재이용 관리계획 수립 용역	----	23
□	하수관로 정비사업	----	24
□	합류식 하수도 및 초기우수 처리시설 사업	----	25
□	전주하수처리장 총인처리시설 사업	----	26
□	하수슬러지(찌꺼기) 처리시설 사업	----	27
□	진기지구 등 마을하수도 정비사업	----	28

중장기 하수도 재무관리계획 수립 용역

원가 대비 낮은 하수도요금으로 인하여 하수처리 수준 향상 및 시설

투자를 위한 재원확보가 어려운 실정으로 전문기관의 진단을 통한

중장기 하수도 재무관리계획을 수립하여 하수도 재원확보 기초 마련

□ 용역개요

○ 용역기간 : ’14. 1월 ～ 4월

○ 예 산 액 : 12백만원

○ 용역내용

- 5개년도 중장기 경영목표, 사업계획, 투자전망 및 관리계획

- 하수도 요금체계 분석을 통한 단계별 현실화 방안

- 타 자치단체(인구 50만이상) 사례 연구

※ 법적근거 : 공기업법 제64조의 3(중기재무관리계획의 수립)

○ 기대효과 : 하수도 요금체계 분석을 통한 현실화 방안 마련으로  건전재정 운영 및 공공 하수처리 서비스 수준 향상

□ 추진계획

○ 중장기 하수도 재무관리계획 수립용역 추진	’14. 2 ～ 4월

- 용역기관 선임 및 계약 체결	’14. 2월

- 용역 수행기관 용역 추진	’14. 3~4월

○ 중장기 하수도 재무관리계획 용역결과 분석	’14. 5월

○ 용역결과에 따른 요금인상 등 단계적 추진	’14. 6월 이후

물 재이용 관리계획 수립 용역

물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행(’11. 6. 9)에 따른

법정계획인 물 재이용 관리계획을 수립하여 물 자원의 효율적 활용과

지속 가능한 이용 방안을 모색

□ 용역개요

○ 용역기간 : ’13. 5. 8 ∼ ’14. 7. 25

○ 대상지역 : 전주시 전 행정구역 및 완주군(상관·이서·구이면)포함

○ 예 산 액 : 850백만원

○ 용역업체 : ㈜범한엔지니어링, 성원기술개발(주)

	추 진 상 황
○ 물 재이용 관리계획 수립용역 발주 ’13. 5월 ○ 물 재이용 관리계획 T/F팀 1차 포럼 ’13. 7월 ○ 물 재이용 관리계획 착수보고회 ’13. 8월 ○ 물 재이용 관리계획 중간보고회 ’14. 1월

□ 금후계획

○ 물 재이용 관리계획 2차보고회	’14. 5월

○ 물 재이용 관리계획(안) 승인요청(환경부)	’14. 6월

○ 물 재이용 관리계획 수립용역 완료	’14. 7월

하수관로 정비사업

○ 하수관로 우․오수 분리와 건물 정화조 폐쇄로 시민보건 위생 향상

○ 지하수, 우수 등 불명수 감소로 하수처리비용 절감

□ 사업개요

(단위 : 백만원)

사 업 명	위 치	사업규모	사 업 비	기 간	비 고
합 계		L=207.8km	159,600
하수처리편입구역 하수관로정비사업	평화, 삼천, 장동 일원	L=77.2km	40,500	08~14
중앙처리구역(10분구) 하수관로정비사업	노송, 중앙, 풍남동 일원	L=26.3km	30,300	09~14
효자처리구역 하수관로정비사업	효자, 송천동 일원	L=29.5km	20,000	12~15
중앙처리구역(3,10분구) 하수관로정비사업	금암, 노송, 덕진동 일원	L=55.3km	39,700	13~16
덕진, 중앙(1분구) 하수관로정비사업	덕진, 송천동 일원	L=19.5km	29,000	14~17

	추 진 상 황
○ 하수처리편입구역 : 총 77.2km 중 68.7km 완료(공정 : 86.9%) - 400억원 ○ 중앙처리(10분구) : 총 26.3km 중 23.1km 완료(공정 : 87.8%) - 292억원 ○ 효자처리구역 : 총 29.5km 중 9.9km 완료(공정 : 31.5%) - 97억원 ○ 중앙(3,10분구) : 실시설계용역 시행중(공정 : 10%) - 14억원 ○ 덕진, 중앙(1분구) : 환경부 협의 완료

□ 금후계획

○ 하수처리편입구역 : 잔여공사 추진 (준공예정 : ‘14. 11월) -  5억원

○ 중앙처리(10분구) : 잔여공사 추진 (준공예정 : ‘14. 12월) - 11억원

○ 효자처리구역     : 잔여공사 추진 (준공예정 : ‘15. 06월) - 76억원

○ 중앙(3,10분구)   : 실시설계용역 완료(‘14.10월), 공사발주 –145억원

○ 덕진, 중앙(1분구) : 실시설계용역 추진(‘14.5월 ～ ’15. 3월) - 21억원

합류식 하수도 및 초기우수 처리시설 사업

새만금 유역에서 발생하는 합류식 하수도 월류수(CSOs) 및 초기우수를 적정 저류·연계처리 하여 새만금유역 목표수질의 조기 달성

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’10년 ~ ’14년(5년간)

○ 위    치 : 전주시 환경사업소 내(덕진구 고내천변로 58)

○ 사업규모 : 저류조 1개소(100천㎥), 우수토실 개량 19개소

○ 사 업 비 : 48,063백만원(국 24,032, 도 4,807, 시 16,821, 기 2,403)

(단위 : 백만원)

구분	총투자 규 모	기투자	투자계획		비고
		2013년까지	2014년	2015년 이후
계	48,063	29,402	18,661	0
국 비	24,032	16,229	7,803	0
도 비	4,807	3,190	1,617	0
시 비	16,821	8,023	8,798	0
기 금	2,403	1,960	443	0

	추 진 상 황
○ 설계 및 공사입찰 공고 ’10. 08월 ~ 12월 ○ 실시설계 적격자 선정 및 공사 계약 체결 ’10.12월 ~’11. 05월 ○ 1, 2, 3차분 공사 추진 완료 ’13. 06월 ○ 4차분 공사 착공 ’13. 07월 ※ 공정율 : 65%

□ 추진계획

○ 4차분 공사 완료	’14. 04월

○ 잔여공사 추진 및 시운전	’14. 04월 ~ 12월

전주하수처리장 총인(T-P)처리시설 사업

하수도법 개정(’10. 2. 26)으로 새만금 상류지역 하수처리장 방류수  수질기준 강화(’12. 1. 1부터 시행)에 따라 총인(T-P) 처리시설 추진

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’10년 ~ ’14년(5년간)

○ 위    치 : 전주시 환경사업소내(덕진구 고내천변로 58)

○ 사업규모 : 403천㎥/일, 총인(T-P) 2.0 ⇨ 0.2mg/L 이하

○ 사 업 비 : 31,355백만원(국 15,678, 도 6,271, 시 7,838, 기 1,568)

(단위 : 백만원)

구분	총투자 규 모	기투자	투자계획		비고
		2013년까지	2014년	2015년 이후
계	31,355	14,273	17,082	0
국 비	15,678	5,030	10,648	0
도 비	6,271	2,560	3,711	0
시 비	7,838	5,938	1,900	0
기 금	1,568	745	823	0

	추 진 상 황
○ 공사발주 ’12. 11월 ○ 실시설계 적격자 선정 ’13. 06월 ○ 공사착공 및 용역 착수 ’13. 10월 ○ 토목공사 추진(터파기, 가시설 등) ’13.11~‘14.1월

□ 추진계획

○ 공사 추진 완료	’14. 10월

○ 시운전 및 사업 준공	’14. 12월

하수슬러지(찌꺼기) 처리시설 사업

’12년부터 하수슬러지 및 가축분뇨의 해양투기 전면 금지정책에 따라

하수슬러지(찌꺼기) 처리시설을 설치하여 하수슬러지를 안정적으로 처리하고 발생량을 감소시켜 자연환경 보전에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’10년 ~ ’16년(7년간)

○ 위    치 : 전주시 환경사업소내 및 완산구 삼천동 안산, 삼산마을 인근

○ 사업규모 : 감량화(250톤⇨150톤/일), 건조 소각(150톤⇨65톤/일)

○ 사 업 비 : 37,848백만원(국 18,474, 시 900, 민자 18,474)

(단위 : 백만원)

구분	총투자 규 모	기투자	투자계획		비고
		2013년까지	2014년	2015년 이후
계	37,848	6,387	15,613	15,848
국 비	18,474	5,487	5,063	7,924
시 비	900	900	0	0
민 자	18,474	0	10,550	7,924

□ 추진계획

○ 행정절차 이행	’14. 01월 ∼ ’14. 03월

- 실시설계 경제성검토(VE) 및 설계심의 : 한국환경공단

- 폐기물 설치계획 승인                  : 전북도

- 도시계획시설(폐기물처리시설, 도로) 실시계획인가 : 전주시

○ 공사 착공 및 준공	’14. 04월 ∼ ’16. 04월

※ 전주시 종합리싸이클링타운 조성사업 일정에 맞추어 추진

진기지구 등 마을하수도 정비사업

○ 농촌마을 하수도 시설개량 오·우수 분리로 하수처리 효율 극대화

○ 주민 삶의 질 향상 및 새만금 상류지역의 하천 수질 개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’10년 ∼ ’14년(5년간)

○ 위    치 : 전주시 덕진구 진기마을 외 3(주정, 화리, 신미산)

○ 사업규모 : 하수관로 L=6.7km, 펌프시설 1개소

○ 사 업 비 : 2,501백만원(국 1,751, 시 656, 기 94)

(단위 : 백만원)

구분	총투자 규 모	기투자	투자계획		비고
		2013년까지	2014년	2015년 이후
계	2,501	2,111	390	0
국 비	1,751	1,440	311	0
시 비	656	593	63	0
기 금	94	78	16	0

	추 진 상 황
○ 사업내용변경 승인(지방환경청) ’12.8월 - 하수처리장을 펌프시설로 변경하여 효자처리구역으로 연계 처리 ○ 1차분 공사 착공 ’13.5월 ○ 2차분 공사 착공 ’13.10월 ※ 공정율 : 50%

□ 추진계획

○ 1차분 공사 완료	’14. 03월

○ 2차분 공사 완료	’14. 06월

○ 잔여분 공사추진 및 준공	’14.7월 ∼ 12월