제321회 전주시의회 제1차 정례회 도 시 건 설 위 원 회

2015년도

주요업무 추진상황 보고

시 민 교 통 본 부

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진계획
	○	대 중 교 통 과	-------	5
	○	생 태 교 통 과	-------	15
	○	도 로 과	-------	27

일  반  현  황

□ 기  구 : 3과 11담당

								시민교통본부
대중교통과 (4 담 당)									생태교통과 (4 담 당)													도 로 과 (3 담 당)
대중교통									생태교통													자전거정책
시내버스									주차지도													도로시설
택 시									교통시설													도로정비
화 물									교통정보

□ 정 ‧ 현원

과 별		총 계	일 반 직						임기제
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	53	1	3	12	18	14	5
	현 원	52	1	3	15	27	4	1	1
대중교통과	정 원	19	1	1	5	7	3	2
	현 원	18	1	1	7	7	1		1
생태교통과	정 원	19		1	4	6	5	3
	현 원	19		1	6	9	2	1
도 로 과	정 원	15		1	3	5	6
	현 원	15		1	3	10	1

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
대 중 교 통 과	○ 대중교통 종합대책 수립 ○ 시민의 버스위원회 운영 ○ 시내버스 지·간선제 노선개편 추진 ○ 교통약자특별운송사업(콜택시, 셔틀버스) 추진 ○ 자동차운송사업체(버스,택시,화물 등) 지원 및 지도감독 등
생 태 교 통 과	○ 교통종합계획 수립, 공영주차장 확충 및 관리 ○ 어린이보호구역 개선사업, 교통영향평가업무 ○ 교통안전시설, 교통신호시설 등 설치 및 유지관리 ○ 지능형 교통체계(ITS) 설치 및 운영관리
도 로 과	○ 자전거이용 활성화, 국․공유재산(도로)관리 및 용도폐지 ○ 신규 도로개설 및 용지보상, 도시가로망 확충사업 ○ 도로유지관리, 도로안내표지판 설치관리 ○ 도로포장 보수지도, 가로등 관리

기  본  현  황

□ 운수업체

○ 버  스

(단위 : 대)

구분	총계	시 내 버 스						관광(전세)	비고
		소계	신성	전일	제일	호남	시민
대수	839	383	95	91	91	74	32	소계 : 456 ▪ 본사(20개사):444 ▪ 영업소(2개사):12

○ 택  시

(단위 : 대)

구 분	계	개인택시	회사택시	비 고
대 수	3,908	2,344	1,564(22개사)

○ 화  물

(단위 : 대)

계		일반화물		개별화물		용달화물
업체수	차량대수	업체수	차량대수	업체수	차량대수	업체수	차량대수
2,193	4,240	276	2,315	806	806	1,111	1,119

□ 주 차 장

구 분	계	노 상	노 외				부 설
			소계	공 영	공한지	민 영
개소 /면수	17,004 /313,666	91 /4,239	436 /19,335	68 /4,845	51 /788	317 /13,702	16,477 /290,092

□ 교통시설

(단위 : 개소, 개)

교차로	LED 신호등	교통신호제어기	시각장애인 음 향 신 호 기	숫자형 잔여시간 표시기	교 통 표지판	차 선	횡단 보도	횡단보도 조명등
776 -신호:605 -경보:171	7,665 -신호:6,801 -경보: 864	543	326	1,322	11,192	▪1,108개 노선 L=738㎞ ▪차선 L=2,812km	2,267 -신호:1,550 -비신호: 717	242개소 598등

□ 지능형 교통시설

(단위 : 개소, 개)

버스도착 안내단말기 (BIT)	가변정보 전광판				교통흐름 관 찰 용 CCTV
	소계	동영상	문자식	도형식
312	16	1	10	5	50

□ 도    로

(단위 : 개소, ㎞)

구 분	계		고속국도		일반국도		지 방 도		시 도
	노선	연장	노선	연장	노선	연장	노선	연장	노선	연장
총연장	1,995	698	2	13	5	41	2	15	1,986	629
포장도	1,995	698	2	13	5	41	2	15	1,986	629
포장율 (%)		100		100		100		100		100

※ 도로율 : 6.8%(도로면적/시가지면적)

□ 교량 및 기타시설물

(단위 : 개)

구분 계	교 량					육교	지하 보도	지하차도	터널	언더 패스	비고
	소계	고속 국도	일반 국도	지방도	시도
156	117		22	4	91	11	6	5	2	15

※ 장대교량 (삼례교 : 570m, 회포대교 : 707m)

대중교통과 소관

□	팔달로 대중교통전용지구 조성	----	6
□	시민의 버스위원회 운영	----	7
□	이용자 중심의 시내버스 노선개편	----	8
□	시내버스 경영·서비스 개선 및 회계투명성 강화	----	9
□	한옥마을 명품 시내버스 운행	----	11
□	교통약자 특별교통수단 개선 운영	----	12
□	일반택시 운송수입금 전액관리제 추진	----	13
□	화물자동차 공영차고지 조성	----	14

『걷고, 즐기고, 꿈꾸는 거리』

팔달로 대중교통전용지구 조성

○ 한옥마을과 전라감영을 연계하는 지역의 유동인구가 증가함에 따라 팔달로 대중교통전용지구를 조성하여 대중교통의 활성화 및 걷고 싶은 보행 환경 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015. 1. ∼ 2018. 12.

○ 사업구간 : 팔달로 충경로 사거리 ⇔ 풍남문 사거리, 550m

○ 총사업비 : 90억 정도(사업비 87억, 용역비 3억)

- 2015년도 예산 : 1억원(기본설계 용역비)

○ 사업내용 : 기본 및 실시설계 용역, 시민 의견수렴, 전용지구 조성

□ 추진상황

○ 대중교통 전용지구 수요조사(국토부)	2015. 1.

○ 대중교통기본계획 및 전용지구 용역착수(국토부)	2015. 5.∼

※ 대중교통 전용지구에 대한 사업비 지원 (2017년부터, 1km당 30억)

○ 전주시 도로관리 기본계획 용역 계약의뢰	2015. 7.

□ 추진계획

○ 전주시 도로관리 기본계획 용역	2015. 8.∼ 2017. 5.

○ 대중교통 전용지구 기본계획 용역	2015. 하반기

○ 국토부 대중교통 기본계획(2017∼2021) 완료	2016. 상반기

○ 경찰서 협의, 상인·시민단체 등 의견수렴 및 홍보	2016. 7.∼

○ 대중교통 전용지구 실시설계 용역	2017. 5.∼

○ 국토부 및 전주시 기본계획에 의거 사업시행	2018. 3.∼ 12.

시민의 버스위원회 운영

○ 운송사업자 및 운수종사자, 시민단체, 시의원, 행정 등이 참여하여노사 및 운영분과로 실무위원회 구성

○ 노사간 화합과 신뢰회복으로 시내버스 문제에 내재된 갈등을 치유하여 시민이 만족하는 교통 환경 조성

□ 사업개요

○ 운영기간 : 2015. 1. ∼ 12.

○ 구성인원 : 33명(노사 대표, 교통전문가, 시의원, 시민단체 등)

○ 주요내용 : 경영 합리화, 근로자 근무환경 개선, 노사화합 등

○ 운영체계 : 공동위원장(3명), 2개 분과(노사 및 운영분과) 구성

- 노사분과 : 보조금 투명성 제고, 경쟁력 강화, 노사 쟁점사항 등

- 운영분과 : 노선개편(지간선제 포함), 승강장 설치, 운영체계 개선 등

□ 추진상황

○ 시민의 버스위원회 회의 개최(13회)	2015. 1. ∼ 6.

- 시민의 버스위원회 회의 및 분과 위원회 6회(전체회의 2, 분과 4),

시민의 버스위원회 소위원회 7회

○ 노사화합 및 상생을 위한 워크샵 개최	2015. 3. 5. ∼ 3. 6.

- 노사·운영분과 구성(분과위원회 심의된 안건을 본 회의에서 의결)

- 시내버스 대타협위원회 ⇨ 시민의 버스위원회 명칭변경 및 회의 정례화

○ 시민의 버스위원회 주요 심의·의결	2015. 5. 28

- 대폐차 보조금 차등지급, 현금수입금 확인원 제도 시행 의결

- 재정지원 투명성 제고 및 노사 갈등 해소를 위한 정책방향 설정

□ 금후계획

○ 시내버스 재정지원 투명성 제고 방안 강구

○ 시내버스 경영평가 세부지표 및 인센티브 지급 방안 논의

○ 노사 갈등 중재를 위한 노조 및 운송사업자 간담회

이용자 중심의 시내버스 노선개편

○ 시내버스 운행의 정시성을 갖춘 편리한 지·간선제 노선체계 개편 추진

○ 시내버스 이용 시민의 편익증진으로 대중교통 이용 활성화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015. 4. ∼ 2016. 하반기

○ 사 업 비 : 2,257백만원(2015년 예산 157백만원)

- 노선개편 용역비 : 157백만원(전주시 78.5백만원, 완주군 78.5백만원)

- 환승센터 조성비 : 1,100백만원(도심부 500백만원, 외곽지역 600백만원)

- 회 차 지 조성비 : 1,000백만원(아중리 방면)

○ 사업내용

- 이용자 중심으로 지·간선제 도입을 위한 노선개편

- 중간용역 결과에 따라 지·간선제 시범운영

□ 추진상황

○ 시내버스 노선개편 실무협의체 구성 및 협의	2015. 2.∼ 6.

- 구성 : 8명(전주 3명, 완주 2명, 사업체 3명)

○ 시내버스 노선체계 개편용역	2015. 4. ∼ 2016. 4.

- 주요 기종점분석 및 수요자 중심의 노선개편 추진

○ 전주시지방대중교통계획 착수	2015. 4. 29.

○ 노선개편 시민홍보 및 희망노선 수요조사	2015. 5. ∼ 7.

□ 금후계획

○ 지간선제 노선개편 T/F팀 구성 운영	2015. 7. ∼

- 의회, 시민의 버스위원회, 군민공감위원회(완주군), 시민단체 등

○ 지·간선제 노선개편 시범운행 추진	2015. 하반기

- 완주군과 협의 일부구간 지․간선제 시범운행, 주민 불편사항 보완

○ 노선개편과 관련된 인프라 구축	2015. 하반기~

- 공영차고지, 회차지, 환승센터, 교통정보 단말기 등

○ 지･간선제 노선개편 시행	2016. 하반기∼

- 노선개편에 따른 홍보강화로 기존노선 이용시민 불편 최소화

시내버스 경영·서비스 개선 및 회계투명성 강화

○ 시내버스 운송사업자 및 친절기사에게 인센티브를 제공함으로써

선의의 경쟁을 통한 안전운행과 시민 서비스 개선

○ 시내버스 재정지원체계 개선 등으로 회계 투명성 및 신뢰성 강화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015. 1. ∼ 12.

○ 대    상 : 시내버스 5개 회사 및 운수종사자

○ 사업내용

- 친절기사 선정으로 타고 싶은 시내버스 문화 확립

- 합리적인 시내버스 재정지원체계 개선으로 투명성 강화

- 차량 안전운행을 위한 조기폐차 유도 및 안전 점검

□ 추진상황

① 시내버스 친절기사 선정	2015. 3. ~ 6.

○ 평가항목 : 안전운행, 시민 응대태도, 교통약자 배려, 친절 사례 등

○ 선정방법 : 시내버스모니터단·일반시민 추천, 친절기사선정위원회 선정

○ 추진실적 : 20명 선정(신성3, 전일5, 제일3, 호남6, 시민3)

② 시내버스 이용 불편민원 근절대책 수립	2015. 5.

○ ’15년 7. 1일부터 가스충전 및 식사로 인한 결행시 과징금 부과(100만원)

○ 1년간 3번의 과태료 처분을 받은 자가 같은 위반행위를 한 경우 자격 취소

○ 운수종사자 교육책자 제작·배부로 교육 강화(1,000부)

③ 시내버스 재정지원 투명성 강화

○ 회계감사 용역보고서 전체 공개	2015. 5. ∼

- 의회, 시민의 버스위원회, 홈페이지 등

○ 표준운송원가 실적치 기준으로 산정 손실액 지원 : 2015. 6.15.

- 재정지원심의원회 지원규모 심의 의결 : 4,863백만원

④ 저상버스 구입 보조금 지원 절차 개선

○ 차량구입(차량등록원부, 세금계산서 확인) 후 버스제작회사로 지급,       국토부장관 승인 후 담보설정토록 개선	2014. 12.∼

○ 보조금 버스제작회사에 직접 지급	2015. 3.~ 6.

- 총 13대 1,291백만원 지급(신성5, 전일2, 제일6)

⑤ 시내버스 안전점검 실시

○ 점검기간 : 2015. 2.16. ~ 3.31.  /  5.21. ∼ 6.11.

○ 점 검 반 : 9명(행정2, 교통안전공단2, 버스회사5)

○ 점검대상 : CNG차량용기, 안전망치, 스테빌라이져, 소화기, 차량파손 등

○ 추진실적 : 149건 정비

- 냉난방장치6건, 소화기7건, 비상용망치18건, 타이어11건, 등화장치35건,

CNG용기58건, 노선도10건, 수송관구2건 휠터1건, 페달장치1건

□ 금후계획

① 현금수입금 확인원제 실시

○ 기    간 : 2015. 9.∼ 2016. 8.(1년간)

○ 사업규모 : 확인원 10명(회사별 2명), 관리원 1명

○ 예 산 액 : 153백만원

○ 내    용 : 현금수입 확인으로 투명성 의혹 해소(노조 참여)

② 외부회계 감사 및 표준운송원가 산정 용역

○ 기 간 : 2015. 12. ∼ 2016. 5.(6개월)

○ 시내버스 외부회계감사 및 표준운송원가 용역 산정방법 개선

- 용역기간 단축(1년 → 6개월),  용역비 절감(1억원 → 5천만원)

- 용역의 연속성을 위해 수의계약 추진

③ 대·폐차보조금 차등지급으로 노후차량 조기 폐차 유도

○ 시행시기 : 2016. 3월부터

○ 시내버스 차령 제한 : 현행 11년 → 9년

○ 대폐차보조금 지급액 개선

- 현 행 : 모든 차량 대폐차시 1천만원 지급

- 변 경 : 9년 이내 대·폐차시 2천만원 지급, 9년 초과 미지급

운송업체 평가 : 2016. 1. ∼ 12.

○ 평가지표 : 4개 분야(경영합리화, 안전관리, 노사관계, 서비스)

○ 인센티브 제공 : 운송업체 평가결과 순위별 보조금 차등 지급

한옥마을 명품 시내버스 운행

○ 한옥마을 관광객 수요 증가로 특색 있는 시내버스를 운행하여 대중     교통 활성화 기여

○ 우리시가 추구하는 시내버스 서비스 방향 제시 및 이용시민 만족도     향상

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015. 2. ~ 12.

○ 사 업 비 : 958백만원(보조금 500백만원, 자부담 458백만원)

○ 사업내용 : 한옥마을 특색에 맞는 차량제작, 정규 노선 시내버스 운행

- 친절기사 고정 배치, 관광해설, 특색 있는 복장 등 최상의 서비스 제공

※ 운행노선(안) : 동물원⇔전주역⇔종합경기장(주차장)⇔고속버스터미널

⇔ 시외버스터미널⇔중앙시장(팔달로)⇔한옥마을(풍남문)

□ 추진상황

○ 운행관련 이해당사자(택시운수종사자) 간담회(6회) : 2015. 3.∼

○ 명품시내버스 내·외부 디자인 협의                  : 2015. 4.

○ 명품시내버스 차량제작                       : 2015. 4.∼

□ 금후계획

○ 이해당사자와 충분한 협의를 통하여 상생방안 강구

- 기존 노선 운행(79번), 운행노선 변경 등

○ 한옥마을 명품 시내버스 운행 개시             : 2015. 하반기

교통약자 특별교통수단 개선 운영

○ 교통약자 특별교통수단의 수요자인 장애인 단체의 요구사항과 서비스     제고를 위한 문제점을 개선·보완하여 수요자의 만족도를 향상하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015. 1.∼ 12.

※ 전주시 시설관리공단 위탁 운영 : 2015. 8.∼계약해지시까지

○ 사업대상 : 교통약자 특별교통수단 차량 37대(콜택시34, 셔틀버스3)

○ 사업내용 : 타당성 검토 용역, 통합관제시스템 구축, 셔틀버스 구입

○ 사 업 비 : 378백만원(용역 18, 통합관제시스템 200, 셔틀버스 구입 160)

◦ 위탁기간 : 2015. 1. ∼ 2015. 7.

◦ 위탁대상 : 37대(장애인콜택시34, 셔틀버스3)

◦ 위탁단체 : 사)전북곰두리봉사대

◦ 위탁예산 : 총 사업비 1,575백만원(도 317 시 1,258) 중 919백만원(도 184 시 735)

교통약자특별운송수단 위탁현황

□ 추진상황

○ 시설관리공단 위탁에 대한 타당성 용역 : 2015. 1.∼ 3.

- 위탁사업에 대한 타당성 검토, 문제점 개선사항 검토 등

○ 운영개선 간담회 및 교통약자 이동편의증진위원회 개최 : 2015. 4.

- 기본요금 조정, 이용 대상자 조정, 애로사항 등 청취

○ 시설관리공단『교통약자 특별교통수단』위탁절차 추진 : 2015. 5. ∼ 6.

- 시의회 동의안 의결, 위·수탁 계약 체결

□ 금후계획

○ 사무(시설)업무 인계인수 절차이행              : 2015. 7.

○ GPS기반 통합관제시스템 프로그램 개발 및 운영 : 2015. 7.~ 8.

○『교통약자특별교통수단』위탁운영               : 2015. 8.∼

○ 신규 셔틀버스 운행 개시(1대)                 : 2015.10.∼

일반택시 운송수입금 전액관리제 추진

○ 일반택시 운송수입금 전액관리제 시행으로 사업경영 투명성 확보 및     근로자 처우 개선으로 서비스 질 향상 도모

□ 개   요

○ 시행시기 : 노사 합의된 업체부터 우선 시행

○ 대    상 : 22개 법인택시

○ 내    용 : 운수종사자⇨운송수입금 납부, 운송사업자⇨운송수입금                  수납, 기준금 등은 노사간 합의

○ 근    거 : 여객자동차 운수사업법 제21조(운송사업자의 준수사항)

◦ 단 체 명 : 민주노총 공공운수노조 택시지부

◦ 방    법 : 집회(’14. 3. 24.~) 및 천막농성(’14. 12. 29.~)

◦ 요구사항 : 7개사 운송사업자 및 운수종사자 행정처분 요구

- 전액관리제 이행에 따른 종사자 근로 조건 합의서 서명 요구

- 근로시간 1일 6시40분, 주 40시간, 월 203시간, 월 120만원 보장

민원개요

□ 추진상황

○ 전액관리제 관련 노조 및 운송사업자 간담회 : 17회

- 민주노총 공공운수노조 택시지부 6회, 운송사업자 11회

○ 7개사 운송사업자 행정처분(1차 과태료 부과)   : 2015. 5. 6.

※ 과태료 1차 5백만원, 2차 10백만원, 3차 10백만, 4차 감차, 5차 사업정지, 6차 면허취소

○ 운수종사자 과태료 사전통지(7개사 587명)     : 2015. 5. 7.

※ 전체사업장 동일하게 행정처분 요구(형평성 주장) : 7개사 기업별 노조

○ 한국노총 소속 13개사 노사간 전액관리제 협의    : 2015. 6. 30.

□ 금후계획

○ 전액관리제 위반에 대한 처분 목적이 아닌 시행을 위한 행정력 강화

○ 7개사 전액관리제 미이행시 운송사업자 2차 행정처분 : 2015. 7월중

○ 전 사업장 전액관리제 준수사항 지속적 행정 지도

화물자동차 공영차고지 조성

○ 물류거점 확보로 경쟁력을 강화하여 화물운송사업의 발전을 도모하고,  주택가 및 아파트 주변 도로의 밤샘주차 등 시민 불편을 해소하여 시민 편익을 증진하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015. 1. ∼ 12.

○ 사 업 비 : 2,790백만원(용역비 200, 토지매입비 2,590)

○ 사업내용 : 효율적인 운영관리방안 및 기본･실시설계 용역, 용지매입

◦ 사업장소 : 덕진구 장동유통로 12(장동유통단지내 화물터미널부지)

◦ 사업기간 : 2013년 ∼ 2017년(5개년)

◦ 사업규모 : 41,680㎡(주차면수 500면, 관리동 및 편의시설 1,600㎡정도)

◦ 총사업비 : 120.9억원(지특 84.6억, 시비 36.3억)

※ 용역비 2억 / 토지매입비 77.5억 / 관리동 및 정비동 18억 / 주차장 및 주차시설물 23.4억

조성개요

□ 추진상황

○ 도시관리계획 결정 용역(42백만원)	2015. 3. ∼ 9.

○ 효율적인 운영방안 연구용역(16백만원)	2015. 4. ∼ 9.

○ 공영차고지 토지매입 1차분 지급	2015. 5. 15.

※ 1차분 2,588백만원, 2차분 2,698백만원, 3차분 2,883백만원

□ 금후계획

○ 공영차고지 실시설계 용역	2016. 3.

○ 공영차고지 용지매입(2차, 3차)	2016. ∼ 2017.

○ 공영차고지 조성완료 및 운영	2017. 이후

생태교통과  소관

□	동남부권 공영주차장 조성	----	16
□	공영주차장 요금수납 무인시스템 구축	----	17
□	친환경 녹지 공영주차장 조성	----	18
□	내 집 주차장 그린파킹 사업	----	19
□	스쿨존 어린이 안전지킴이 운영	----	20
□	교통약자를 위한 교통안전교육 위탁관리	----	21
□	안전하고 편리한 교통환경 조성	----	22
□	어린이보호구역 개선 및 정비사업	----	23
□	노인보호구역 개선 및 정비사업	----	24
	광역교통정보 기반 확충 사업	----	25
	전주 완주 광역버스정보시스템 구축사업	----	26

동남부권 공영주차장 조성

○ 한옥마을 관광객 급증으로 주변의 주차난이 심각하여 한시적으로

임시 주차장을 조성하고 있으나, 근본적인 주차난 해소를 위하여 인근

지역에 대형주차장을 조성 한옥마을 주차난을 해소하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 대성동 주변

○ 사업규모 : 면적 28,572㎡,  1,000면 정도

○ 총사업비 : 9,000백만원 (2015년 – 1,500백만원)

○ 사업기간 : 2015년 ~ 2017년

□ 추진상황

○ 주차장 조성계획 수립 및 지방투융자 심사 완료	2014.

○ 도시계획시설결정 및 실시계획인가 용역착수	2015. 3.

□ 쟁점사항

○ 총사업비 90억원 중 45억원(50%)을 국비로 확보할 예정이나, 주차장

조성 사업은 국비보조사업에서 제외되어 지특예산으로 확보해야하며

○ 국비(지특) 예산은 시설비만 지원 가능하여 부지매입비 70억원은

자체예산으로 충당하고, 2017년 지특예산으로 시설비 20억원을 확보       해야하나 지특예산 확보에 어려움이 있음

□ 지역구 국회의원과 연대하여 국비 예산 확보토록 적극 추진

□ 금후계획

○ 도시계획시설결정 및 실시계획인가 용역완료	2015. 12.

○ 지장물 감정평가 및 부지매입 추진	2016. 1. ∼ 12.

○ 공사발주 및 준공	2017. 1. ∼ 12.

공영주차장 요금수납 무인시스템 구축

○ 공영주차장 요금수납 무인시스템 및 통합관리시스템을 구축하여

주차장 운영의 재정 건전성 확보 및 주차장 이용객 편의 제공

□ 사업개요

○ 사업대상 : 신규 주차장 및 수익성이 있는 기존 주차장 5개소

○ 사 업 비 : 500백만원

○ 사업기간 : 2015. 7. ~ 12.

○ 사업내용 : 무인시스템 및 통합관리시스템 구축, 주차관리소 등

※ 공영주차장 : 68개소 4,845면 (유료 8개소 1,040면, 무료 60개소  3,805면)

□ 추진상황

○ 무인시스템 운영지역 견학(서울, 여수)	2014. 12.

□ 쟁점사항

○ 상반기에 시설관리공단에서 추진한 무인시스템의 인력운영, 요금 면제자       처리, 프로그램 등을 시범 운영 후 종합 분석 추진

□ 시범 운영시 나타난 문제점을 보완하여 민원을 최소화 하고,

무인시스템의 연계 방안을 모색하여 수익성 및 회전율이 높은

적정 대상지를 선정 추진

□ 금후계획

○ 대상 주차장 선정	2015. 7.

○ 시스템 구축사업 추진	2015. 8. ~ 10.

- 통합관리실 구축, 관급자재(무인장비, 프로그램) 구입 및 설치 친환경 녹지 공영주차장 조성

○ 주차수급실태 조사결과 주차난이 심각한 지역 및 도심지, 주택 밀집 지역에

친환경 녹지 공영주차장을 조성하여 주민편익 도모 및 주변 환경 조성

□ 사업개요

○ 사업규모 : 5개소  200면정도

○ 사 업 비 : 1,225백만원

○ 사업기간 : 2015. 1. ∼ 12.

○ 사업내용 : 잔디블럭, 조경식재, 주민편익시설 등

※ 주차수급 실태조사 순위에 의한 부지 확보 가능 지역 공영주차장 조성

□ 추진상황

○ 친환경 녹지 공영주차장 조성 : 2개소 1,027면

- 한옥마을 임시주차장  1,000면, 남노송동 주차장  27면

○ 인후2동 주차장 부지매입 완료

□ 금후계획

○ 2015년 부지매입분(인후2동) 주차장 조성	2015. 7. ∼ 9.

- 실시설계(7월), 착공 및 준공(8~9월)

○ 주차수급실태조사 우선순위에 의한 부지매입 조성(신규)

- 행정절차 이행(도시계획시설결정, 실시설계용역 등) :	2015. 7. ∼  9.

- 공사발주 및 준공	2015. 9. ∼12.

○ 시설관리공단 위탁 운영	2015. 12.

내 집 주차장 그린파킹 사업

○ 주차공간이 부족한 주택가 밀집지역에 위치한 단독주택 및 공동주택에      친환경자재를 사용하여 녹색주차장을 조성, 도심 열섬화 저감 및

주차난 해소

□ 사업개요

○ 사업규모 : 20개소 100면 정도

○ 지원대상

- 단독주택 : 대문과 담장 개방 및 친환경 주차장 조성 희망자

- 공동주택 : ’94년 이전 사업승인 된 20세대 이상으로서 부대시설ㆍ

운동시설ㆍ녹지시설 등 여유 공간을 친환경 주차장으로             행위허가 득한 공동주택

○ 사 업 비 : 100백만원

○ 사업기간 : 2015. 1. ∼ 12.

○ 사업비 지원

- 단독주택 : 담장철거 150만원, 대문철거 170만원, 옆집 공동설치 200만원

- 공동주택 : 1대당 50만원,  최대 1,000만원(20대)까지 지원

□ 추진상황

○ 주차장 조성 : 총 13개소  101면  48백만원

- 단독주택 :  8개소  9면  14백만원

- 공동주택 :  5개소 92면  34백만원

□ 금후계획

○ 홍보실시(언론, 아파트관리사무소, 전주다움 소식지 활용)	연중

○ 주차시설 신청 및 접수	연중

○ 주차시설 설치 및 보조금 교부	연중

스쿨존 어린이 안전지킴이 운영

○ 스쿨존 내에 어린이 안전지킴이 봉사자 배치 운영으로 통학길에

발생할 수 있는 교통사고 및 각종 범죄로부터 어린이를 보호하고,

교통법규 준수 생활화를 위한 현장교육 및 학교주변 순찰 강화로

안전한 어린이 통학환경 조성

□ 사업개요

○ 사업규모 : 50개 초등학교 / 100명 (학교별 2명)

○ 사 업 비 : 200백만원

○ 사업기간 : 2015. 3. ∼ 12. (방학기간 제외)

○ 사업내용 : 하교시간대 교통취약지역 어린이 교통지도 및 우범지역

순찰활동으로 안전사고 방지

○ 참여대상 : 녹색어머니회 등 교통관련 자원봉사단체 회원

□ 추진상황

○ 상반기 참여단체 및 봉사자 모집	2015. 1. ∼ 2.

○ 안전지킴이 봉사자 안전교육 실시(도로교통공단)	2015. 3.

○ 상반기 학교별 참여자 배치 및 운영(50개교 100명) : 2015. 3. ∼ 7.

※ 보행안전도우미 사업(Walking School Bus)과 병행 추진

: 6개교 12노선 26명

□ 금후계획

○ 하반기 참여단체 및 봉사자 모집	2015. 7. ∼ 8.

○ 안전지킴이 봉사자 안전교육 실시(도로교통공단)	2015. 8.

○ 하반기 학교별 참여자 배치 및 운영	2015. 8. ∼ 12.

○ 스쿨존 안전지킴이 평가 및 우수봉사자 시상	2015. 12.

교통약자를 위한 교통안전교육 위탁관리

○ 어린이, 노인 등 교통약자의 교통안전에 대한 중요성이 날로 증가하여

교통안전교육 위탁사업자를 선정, 전문적인 프로그램 운영을 통해

교육효과 증대 및 교통사고 줄이기에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015. 1. ~ 12. (위탁기간 : 2014. 4. ~ 2017. 3.)

○ 위탁업체 : (사)전북안전교육협회

○ 사 업 비 : 80백만원

○ 위탁내용 : 교통약자 대상 교통안전 전문교육 운영

- 어린이, 노인 교통안전 교육 …………………… 12,000명 정도

▪어린이 교통사고 예방을 위한 교통공원 체험교육

▪노인회관, 경로당 등 찾아가는 교통안전교실 운영

- 하굣길 안전지킴이 교통안전 교육 ……………… 200명 정도

□ 추진상황 : 총 137회  5,944명

○ 교통공원 활용 어린이 교통체험 학습관 운영	47회  2,797명

○ 찾아가는 어르신 교통안전교육	52회  1,347명

○ 하굣길 교통안전봉사자 교통안전교육	2회    196명

○ 스쿨존 현장방문 교육	28회  1,566명

○ 주말 교통공원 방문가족 교육	8회     38명

□ 금후계획

○ 추진실적 및 운영성과 중간평가(1차년도)	2015. 7.

○ 교육 만족도 조사	연 2회(7월, 12월)

○ 교육 운영상황 현장 확인 및 지도점검	매월 1회 이상

○ 보조금 집행 내역서 검토·확인	매월 1회

안전하고 편리한 교통환경 조성

○ 교통안전시설 확충 및 신속한 보수로 교통사고 예방

○ 연간 단가계약 시행으로 교통민원 신속처리 및 시민 편익증진 기여

□ 현    황

시설명	신호등	차 선	교통표지판	시선유도시설	기타시설
수량	7,665	L=2,812km 횡단보도 2,267개소	11,192개	91,453개	반사경 1,864개 안전휀스 6,345m

□ 사업개요

○ 사 업 비 : 3,300백만원

○ 사업기간 : 2015. 1. ~ 12.

○ 사업내용 : 차선 및 횡단보도 도색, 교통안전시설물 확충 및 정비,

교통신호등 신설 및 개선, 횡단보도 조명등 설치 및 보수

○ 사업규모

(단위:백만원)

사 업 명	사업비	사업내용
합 계	3,300
차선도색 및 지우기	2,000	□차선도색 : L=300km, □횡단보도 도색 : 350개소
교통신호등 신설 및 개선	1,000	□신호등 신설 및 가로재 교체(50개 교차로)
교통안전시설 설치 및 보수	200	□표지판 정비 500개소 □반사경 정비 50개 □시선유도봉 정비 1,000개 □무단횡단방지시설 200m
횡단보도조명등 설치 및 보수	100	□횡단보도 조명등 신설 및 개선 40개소

□ 추진상황

○ 차선도색 및 지우기사업 1차분(8권역) 완료 및 2차분(8권역) 발주 :	2015. 4.~ 6.

○ 교통안전시설 설치 및 보수(단가계약) 추진(공정률 95%) : 2015. 2.~6.

○ 교통신호등 신설 및 개선(공정률 60%)	2015. 2.~6.

○ 횡단보도 조명등 설치 및 보수(공정률 60%)	2015. 2.~6.

□ 금후계획

○ 차선도색 및 지우기사업(단가계약) 3차분 추진	2015. 8.~12.

○ 교통안전시설 설치 및 보수 추경 확보분 추진	2015. 8.~12.

○ 교통신호등 신설 및 개선	2015. 7.~12.

○ 횡단보도 조명등 설치 및 보수	2015. 7.~12.

어린이보호구역 개선 및 정비사업

○ 신규로 지정이 필요한 유치원 및 어린이집 개선사업 시행

○ 개선사업이 완료된 시설 중 노후, 파손, 보완시설에 대한 지속적인 정비시행

□ 현    황

구 분	합 계	초등학교	특수학교	유치원		어린이집	비 고
				일반	병설
대 상	251	67	5	122		57	※ 어린이집은 100인 이상 어린이보호구역지정 대상, 단, 100인 미만은 경찰서 협의 시 지정 가능
				80	42
지 정	218	67	5	102		44
				60	42
미지정	33	-	-	20		13
				20	-

※ 어린이보호구역 개선사업 완료 : 218개교 (2003∼2013년, 2014년도 유지관리)

어린이보호 말하는CCTV 구축완료 : 67개초교 449대 (2009∼2014년)

□ 사업개요

○ 사업규모 : 화산초등학교 외 5개소 개선 및 218개교 유지관리

○ 사 업 비 : 600백만원(국비 200, 시비 400)

○ 사업기간 : 2015. 1. ∼ 11.

○ 사업내용 : 스피드디스플레이 설치, 인도개설, 시인성 확보시설, 안전휀스 등

□ 추진상황

○ 어린이보호구역 유지보수(단가계약) 추진(공정률 90%) : 2015. 2.∼6.

○ 스피드디스플레이 설치공사 추진(공정률 60%)  : 2015. 5.∼6.

○ 어린이보호구역개선사업(6개교) 실시설계 및 발주 : 2015. 3.∼6.

□ 금후계획

○ 스피드디스플레이 설치공사 준공	2015.  8.

○ 어린이보호구역 개선사업(6개교) 준공	2015.  9.

○ 어린이보호구역 유지보수(단가계약) 준공	2015. 11.

노인보호구역 개선 및 정비사업

○ 교통 약자인 어르신을 교통 안전사고로부터 보호하기 위하여

실질적인 안전대책 강구

○ 노인보호구역 주변 무단횡단 다발지역에 대한 시설 보완 필요

《관내 65세이상 교통사고 발생현황》

*주요 사고유형 : 무단횡단 사망사고(경찰서 집계)

년도별	2014	2013	2012	2011	2010	2009	비고
사망자수(명)	10	22	22	12	32	23

□ 사업개요

○ 사업대상 : 관내 9개소 (노인보호구역지정)

- 덕진, 양지, 서원, 안골, 금암, 꽃밭정이, 전북노인복지관,

전주시노인취업지원센터, 산성경로문화관

○ 사 업 비 : 100백만원

○ 사업기간 : 2015. 1. ∼ 11.

○ 사업내용 : 무단횡단 방지시설, 안전휀스, 미끄럼방지포장, 노면표시 등

□ 추진사항

○ 노인보호구역 유지보수(단가계약) 추진(공정률 20%) : 2015. 2. ∼ 6.

※ 완산․덕진경찰서와 합동으로 정비대상시설 조사완료(2015. 5)

□ 금후계획

○ 민원발생지, 노후 및 긴급 개선시설물 현장조사 후 지속 정비 : 2015. 7.~ 11.

광역교통정보 기반 확충 사업

○ 각 지자체별로 운영되는 지능형교통시스템(ITS)을 동일생활권 인접

도시간 광역 교통정보 수집·제공이 가능하도록 연계 추진사업

- 정확하고 신뢰성 있는 무단절 교통정보 서비스 제공 편익 극대화

- 혁신도시 등 도시 팽창에 따른 인접 지자체간 광역교통정보 기반구축 필요

□ 사업개요

○ 사업대상 : 전주권 도시지역 4개시(전주․군산․익산․김제) 공동추진

○ 총사업비 : 7,150백만원 (4개시 20,500백만원) / 국비 100%

-  2015년도 사업비 배정 : 2,021백만원

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2016년

- 2015년 사업비 배정 축소로 사업기간 연장가능성 대두

○ 사업내용

- 도로가변전광판(VMS) 6대, 동영상 수집장치(CCTV)설치 17대

- 노변기지국(RSE) 68개소, 차내 단말기(OBE) 설치 2,500대

- 교통정보센터시스템 확충 개선(자가망 구성 등)

※ 2015년도 사업내용 : 광통신망(자가망) 구축 64Km, 센터시스템 보완 1식

□ 추진상황

○ 국가 공모사업 선정(경찰청)	2013.  1.

○ 기본설계 완료(125백만원, 도로교통공단)	2014. 12.

□ 쟁점사항

○ 감사원 IT감사단 감사결과 통보 ⇒ 경찰청(2015. 3.31.)

- ATMS(국토부주관)사업과 중복성(교통정보수집) 지적으로 사업 중단 요청

○ 경찰청 관계부서 회의 (2015. 4.24.)

- UTIS 사업과 ATMS사업 중복이 아니라는 것을 증명 할 수 있는

자료 제출 및 검토 후 예산배정 계획

□ 금후계획

○ 실시설계 발주	2015. 7.

○ 공사발주 및 시행(1차년)	2015. 12. ~ 2016. 12.

전주 완주 광역버스정보시스템 구축사업

○ 전주·완주는 공동 생활권으로 시내버스 전체 노선의 75%가 양 시·군을       왕복하는 노선으로 전주·완주 광역 버스정보시스템(BIS) 구축으로     시내버스 이용객 편의증진

○ 기 설치된 노후 시스템 교체로 부정확한 안내 정보 표출민원 해소

□ 사업개요

○ 사업대상 : 전주․완주 운행 시내버스 및 버스도착안내단말기 미설치 승강장

○ 사 업 비 : 834백만원 (국비 250, 시비 584)

○ 사업기간 : 2015. 1. ~ 12.

○ 사업내용

- 차량단말기(OBE) 설치 : 402대

□통신방식  변경 : 기존 TRS방식 ⇨ LTE방식

- 승강장 버스도착안내단말기(BIT) 설치 : 20개소

- 전산시스템 보완 등 1식

※ 완주군 : 366백만원 (국비 110, 군비 256) / BIT설치 15개소

□ 추진상황

○ 사업 설계 및 관련부서 협의	2015. 1.~ 6.

□ 쟁점사항

○ 사업을 완주군과 별도로 발주할 경우 센터장비 등 공통부담 비용 산출이       어려운 관계로 완주군과 통합한 일괄 발주로 전환

- 완주군과 구두 협약 완료(차후 협정서 작성 계획)

- 우리시 사업비 절감 : 1억원 정도

□ 금후계획

○ 완주군 사업비 포함 총괄 발주	2015.  7.

- 완주군과 협정서 체결(체결시 당초 사업 물량 변경가능 명시)

○ 사업준공	2015. 12.

- 준공 후 해당 업체에 각 자치단체별 사업비 지급

도 로 과  소 관

□	자전거이용 활성화 추진	----	28
□	정여립로(쑥고개로∼콩쥐팥쥐로)개설	----	29
□	효자로(그랜드자동차학원∼천잠로) 확장	----	30
□	쑥고개길(안행교사거리∼효자광장) 확장	----	31
□	동부대로(호성로) 보행환경 조성	----	32
□	혁신로(호남제일문∼동산고가교) 확장	----	33
□	전진로(안덕원지하차도∼동전주IC) 확장	----	34
□	대동로(대신증권∼중앙시장) 확장	----	35
□	도로명 안내표지 설치	----	36
	교통사고 위험도로 구조개선	----	37
	도로 건설·관리 계획 수립 용역	----	38
	회전 교차로 및 교통사고 잦은 곳 개선	----	39
	외곽지역 및 우범지역 가로등 설치	----	40
	북부권 국도대체우회도로 건설(용정∼용진)	----	41
	북부권 국도대체우회도로 건설(용진∼우아)	----	42
	새만금∼전주간 고속도로 건설	----	43

자전거이용 활성화 추진

○ 다양한 정책들을 통해 통학/통근/장보기 등 생활형 시티바이크에       대한 시민의 의식 변화를 유도

○ 환경오염, 에너지, 교통체증 등의 문제에 대한 효과적인 처방적 대안마련

○ 시민의 생활편익 및 건강증진, 건전한 여가활동을 통한 삶의 질 향상에 기여

□ 현    황

○ 자전거 도로 : 79개 노선 / 367km

○ 자전거보관대 : 348개소 / 2,749대

○ 공영자전거대여소 운영 : 2개소(덕진하천관리소, 전주자연생태박물관)

□ 추진상황

○ 공영자전거대여소 운영 : 2개소(1월~5월 : 1,560명 이용)

○ 전주시민 자전거 대행진 행사 개최(3회 500명)

○ 자전거보관대 일제조사(1회), 자전거도로 일제정비(1회)

○ 시민 무료자전거교실 운영(300명)

○ 자전거 선진지 견학 벤치마킹(순천시, 대구광역시)

○ 자전거이용활성화 T/F팀 구성 및 간담회 개최(3회)

□ 금후계획

○ 자전거 다울마당 운영 ----------------------------- 2015. 7.

○ 자전거이용활성화 용역실시 ------------------------ 2015. 7.

○ 자전거 대행진 추진 ------------------------------- 2015. 7.

○ 자전거 보관대 설치 및 정비(20개소, 50백만원) ---- 2015. 7.

정여립로(쑥고개로∼콩쥐팥쥐로) 개설

○ 2009년 준공된 전주영상 제작단지의 열악한 진입로 환경 개선으로

대형 영화장비 진․출입 등의 문제 해결로 영화제작 환경개선

○ 향후 혁신도시를 잇는 교통량에 대비한 간선도로망 조기 개설

□ 사업개요

○ 위    치 : 쑥고개로∼자원순환단지∼콩쥐팥쥐로

○ 사업기간 : 2003년∼2020년(18개년)

○ 총사업비 : 51,000백만원(공사비 38,500, 보상비 12,500)

○ 사업규모 : 연장 3,750m, 폭 35m

구 분	구간	사업규모	사업기간	사업비 (백만원)	비고
전 체	쑥고개로~원상림마을앞 ~콩쥐팥쥐로	연장 3,750m 폭 35m	2003~2020	51,000
기 완 료	쑥고개로∼자원순환단지	연장 2,150 폭 15m	2003∼2010	12,000	자원위생과
1단계-1	자원순환단지∼원상림마을	연장 450m 폭 15m	2008∼2015	9,200	도 로 과
	※ 원상림마을∼영상제작 단지(소로)	연장 402m 폭 10m
1단계-2	원상림마을∼콩쥐팥쥐로	연장 1,150m 폭 15m	2014∼2015	6,800	자원위생과
2단계 (도로확장)	쑥고개로∼원상림마을∼콩쥐팥쥐로	연장 3,750m 폭 15→35m	2016 이후	23,000	도 로 과

□ 추진상황(1단계-1, 공정율 100%)

○ 공 사 착 공 ---------------------------------------- 2013. 4. 10.

○ 공 사 준 공 ---------------------------------------- 2015. 6. 30.

※ 금년말까지 전구간(쑥고개로∼원상림마을∼콩쥐팥쥐로) 2차선으로 개통하고,

추후, 교통량 추이 등을 보면서 6차선 확장(15m→35m) 검토 필요

효자로(그랜드자동차학원∼천잠로) 확장

○ 혁신도시와 효자 4․5택지 서부신시가지간 도시가로망 확충

○ 급속한 택지 개발로 날로 증가하고 있는 교통량에 대한 탄력적 대응

□ 사업개요

○ 위    치 : 효자동 그랜드자동차학원∼천잠로

○ 사업기간 : 2012년∼2015년(3개년)

○ 사 업 비 : 10,183백만원(보상비 5,000, 공사비 5,183)

- 기 투 자 : 10,183백만원

○ 사업규모 : 연장 750m, 폭 10m ⇨ 35m

□ 추진상황 (공정율 100%)

○ 공 사 착 공 ---------------------------------- 2013.  9.

○ 토지보상 완료 -------------------------------- 2013. 11.

○ 인도조성, 중앙분리대, 조경 식재 등 구조물 완료 ---- 2014.  12.

○ 전구간(6차로) 표층포장, 개통 완료 ------------- 2014.  12.

○ 부대공사(난간 설치 등) 완료 ------------------ 2015.  1.

○ 공 사 완 료 ---------------------------------- 2015.  2.

※ 공사완료 후 차량 통행 중(6차로)

쑥고개길(안행교사거리∼효자광장) 확장

○ 시내를 통과하는 국도1호선 확장으로 교통체증 해소

○ 효자 4,5택지 개발로 증가하는 교통량의 탄력적 대응 및 보행환경 개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 효자동 안행교사거리∼효자광장

○ 사업기간 : 2006년∼2015년(10개년)

○ 사 업 비 : 10,500백만원(보상비 7,300,  공사비 3,200)

- 기 투 자 : 10,500백만원

○ 사업규모 : 연장 620m, 폭 25m ⇨ 35m

□ 추진상황(공정율 50%)

○ 공 사 착 공 ------------------------------------ 2013. 10.

○ 기존 수목이식 완료 ----------------------------- 2014. 12.

○ 지하매설물(한전, 도시가스 등) 매설완료 --------- 2015.  5.

○ 인도 및 지자전거도로 완료(한쪽면 : 효사랑병원앞) -- 2015.  6.

□ 금후계획

○ 인도 및 지자전거도로 완료(한쪽면 : 효사랑병원 건너편) -- 2015.  8.

○ 도로포장공사 ----------------------------------- 2015. 10.

○ 가로수 식재 ------------------------------------ 2015. 11.

○ 공 사 완 료 ------------------------------------ 2015. 12.

동부대로(호성로) 보행환경 조성

○ 급속한 주변개발로 보행자가 증가함에 따라 도로확장 및 인도 개설 필요

○ 도로확장 및 보행환경개선으로 교통사고 발생예방 및 주민불편사항 해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 송천동 전미로∼호성동 차량등록사업소

○ 사업기간 : 2009년∼2016년(8개년)

○ 사 업 비 : 18,000백만원(보상비 6,000, 공사비 12,000)

- 기 투 자 : 11,790백만원        - 2015년도 : 1,000백만원

- 이후계획 : 5,210백만원

○ 사업규모 : 연장 3,000m 폭 18.5m ⇨ 35m

□ 추진상황(공정율 60%)

○ 전미로∼구)기린육교(연장 1,500m) 확장공사 완료  --- 2011.  2.

○ 기린육교∼대송장례식장(연장 500m) 확장공사 완료 ---  2013.  6.

○ 토지 및 지장물 협의(19필지) ------------------------ 2015.  5.

※ 대송장례식장∼차량등록사업소(연장 1,000m) 미확장에 따른 교통

해소 효과 저조 및 주민통행 불편

□ 부족사업비 조기에 확보하여 우선 한쪽면(시내쪽) 확장 추진

□ 금후계획

○ 미협의 편입토지(시내쪽, 1필지) 수용재결 ------- 2015.  8.

○ 공사착공(시내쪽, L=500m) ------------------- 2015.  9.

○ 공사완료(시내쪽, L=500m) ------------------- 2015. 12.

○ 전체 공사완료 --------------------------------  2016. 12.

혁신로(호남제일문∼동산고가교) 확장

○ 동산동, 조촌동 일대 유동인구 증가로 인한 보행권 확보가 필요

○ 차량의 급속한 증가로 인한 도로확장으로 교통체증 해소에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 여의동 호남제일문∼반월동 동산고가교

○ 사업기간 : 2008년∼2016년(9개년)

○ 사 업 비 : 11,200백만원(보상비 4,400, 공사비 6,800)

- 기 투 자  : 4,700백만원(보상비)

- 2015년도 : 1,000백만원        - 이후계획 :  5,500백만원

○ 사업규모 : 연장 1,000m 폭 18.5m ⇨ 35m

□ 추진상황

○ 실시계획인가 ----------------------------------- 2009. 12.

○ 전체 76필지 중 62필지 보상완료 ---------------- 2015.  4.

○ 공 사 착 공(1차분) ---------------------------- 2015.  5.

※ 우측(시내쪽) : 호남제일문∼반달회관 구간, 연장 500m 공사추진중

□ 금후계획

○ 미협의토지 수용재결(14필지) -------------------- 2015.  9.

○ 1차분 공사완료 --------------------------------- 2015. 11.

○ 전체 공사완료----------------------------------- 2017. 12.

전진로(안덕원지하차도∼동전주IC) 확장

○ 완주~순천간 고속도로 동전주IC 개통으로 시가지 진입 교통량 증가

○ 반폭개설 된 도로를 확장하여 동부지역 관문의 교통체증 해소에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 산정동 안덕원지하차도∼동전주IC

○ 사업기간 : 2013년∼2016년(4개년)

○ 사 업 비 : 10,800백만원(보상비 2,800,  공사비 8,000)

- 기 투 자 : 4,000백만원           - 이후계획 : 6,800백만원

○ 사업규모 : 연장 860m, 폭 18m ⇨ 35m

□ 추진상황

○ 실시계획인가 ----------------------------------- 2014.  3.

○ 실시설계 용역 ---------------------------------- 2014.  4.

○ 편입토지 77필지 중 72필지 보상완료 ------------ 2015.  5.

※ 잔여필지(5필지)에 대하여 협의보상 추진중

※ 그동안 전진로 확장사업을 국도대체우회도로 건설공사(용진-우아)에 포함,

국가사업(익산국토관리청)으로 시행 건의

□ 국가사업(용진-우아)으로 미추진 시 하반기 공사착수 예정

□ 금후계획

○ 공 사 착 공 ------------------------------------ 2015. 10.

○ 공 사 완 료 ------------------------------------ 2016.  6.

○ 전체공사 완료 ---------------------------------- 2017. 12.

대동로(대신증권∼중앙시장) 확장

○ 공구거리 조성과 연계하여 안전한 보행권 확보 및 교통정체 해소

○ 조기 도로개설로 원도심 및 공구거리 활성화 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 태평동 대신증권∼중앙시장 우신호텔사거리

○ 사업기간 : 2014년∼2016년(3개년)

○ 사 업 비 : 4,000백만원(보상비 3,500, 공사비 500)

- 기 투 자 : 20백만원(실시설계 용역)

- 2015년도 : 500백만원           - 이후계획 : 3,480백만원

○ 사업규모 :  연장 78m, 폭 15m ⇨ 25m

□ 추진상황

○ 실시계획인가 ----------------------------------- 2014. 10.

○ 실시설계 용역 ---------------------------------- 2014. 12.

○ 편입토지 18필지 중 4필지 보상완료 ------------- 2015.  5.

□ 금후계획

○ 잔여필지 14필지 보상추진 ----------------------  2016.  8.

○ 공 사 착 공 -----------------------------------  2016.  9.

○ 공 사 완 료 -----------------------------------  2017. 12.

도로명 안내표지 설치

○ 도로명 안내 체계 조기도입으로 도로표지 신속한 교체

○ 도심지내 도로표지판과 연계하여 외곽지역까지 도로명 안내표지

설치로 이용객 편의 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내 71개 노선

○ 사업규모 : 도로표지판 정비 1,304개소(신설91, 정비727, 철거 486)

- 시내권 : 1,136개소(신설91, 정비559, 철거 486)

- 시외곽 : 정비 168개소

○ 총사업비 :  50억원(국 35, 시 15)

- 기 투 자 : 44억원(국 31, 시 13)

- 2015년 :  6억원(국   4, 시   2)

○ 사업기간 : 2013. 1. ∼ 2015. 12.(3개년)

□ 추진상황 (공정율 87%)

○ 선도사업 대상도시 선정 --------------------------- 2012.   5.  7.

○ 도로표지설치 자문 및 사업승인(국토교통부) --------- 2013. 11. 19.

○ 공사 착공 ---------------------------------------- 2013. 12. 16.

○ 시내지역 설치(표지판 설치 650개소, 철거 486개소) ---- 2015.  6.

□ 금후계획

○ 공사완료 ---------------------------------------- 2015. 12.

교통사고 위험도로 구조개선

○ 선형변경과 연계된 지역에 예수병원이 위치하고 있어 긴급환자       수송 시 사고위험에 노출되어 있고

○ 예수병원에서 사업의 필요성에 동의 전주시에 토지를 기부채납 상황임

□ 사업개요

○ 위    치 : 서원로(중화산동 예수병원 응급실 ∼신일아파트 진입로)

○ 사업규모 : 연장 300m, 폭 25m∼31.5m

○ 총사업비 : 2,800백만원(국비 1,400, 시비 1,400)

- 2015년도 : 1,700백만원(국비 300, 시비 1,400)

○ 사업기간 : 2015. 1. ∼ 2016. 12.

※ 편입토지현황 : 36필지 7,741㎡(예수병원 토지 전주시 기부채납 협약)

□ 추진상황

○ 위험도로개선사업 중장기 계획 수립(행정자치부) ---- 2014. 1. 29.

○ 예수병원 토지 기부채납 협약체결 ----------------- 2014. 6.  3.

○ 투․융자 심사 -------------------------------------- 2014. 9.  3.

○ 실시설계 용역 완료 ------------------------------- 2015. 4. 30.

○ 지장물 협의보상 완료 ----------------------------- 2015. 5. 18.

□ 금후계획

○ 도시계획시설 실시계획인가 등 행정절차 이행 ------ 2015.  7.

○ 공사 발주  -------------------------------------- 2015.  8.

○ 공사 착수  -------------------------------------- 2015.  9.

○ 공사 완료 --------------------------------------- 2016. 12.

※ 국비 부족분 11억원 ‘15년 추경 또는 ‘16년 예산확보

도로 건설·관리 계획 수립 용역

○ 도로법 제6조에 의거 급증하는 교통수요와 도로개설 변화에 따른      도로건설 및 유지관리 등에 대한 종합계획 수립 관리 필요

○ 중장기 계획 수립 등 지속발전 가능한 도로정책 방향을 제시

□ 용역개요

○ 위    치 : 전주시 관내 도로

○ 용역규모

- 도로건설․관리계획 수립(도로대장 포함, 752km)

- 자전거 이용 활성화계획 수립   (367km)

- 보행안전 및 편의증진 기본계획 (100km)

○ 용 역 비 : 2,500백만원(2015년도 800백만원)

○ 용역기간 : 2015. 9. ∼ 2017. 4.

□ 추진상황

○ 도로 건설․관리계획 용역 추진 계획 수립 ------ 2014.  9. 19.

○ 용역과제 심의 ------------------------------- 2014. 11. 10.

○ 일상감사 ------------------------------------ 2015.  5. 13.

○ 계약심의  ----------------------------------- 2015.  6. 25.

□ 금후계획

○ 입찰공고 ------------------------------------- 2015.  7.

○ 평가위원회 선정 및 입찰참가자격 사전심사(PQ) -- 2015.  7.

○ 업체선정 ------------------------------------- 2015.  8.

○ 용역시행 -------------------------- 2015. 9. ~ 2017.  4 .

※ 도로 건설․관리계획 수립과 연계하여 자전거이용 활성화 계획,

보행안전 및 편의 증진 기본계획 수립 병행 추진

□ 자전거 이용 활성화에 관한 법률 제5조

□ 보행안전 및 편의 증진에 관한 법률 제7조

회전 교차로 및 교통사고 잦은 곳 개선

○ 교통사고 다발지역에 도로구조 개선 및 도로안전시설물 정비를      통한 안전한 도로환경 조성

○ 불필요한 신호대기로 인한 비효율적인 교차로 신호체계 개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 중인삼거리 등 6개소

- 회전교차로 : 중인삼거리, 동물원입구, 호성동 뜨란채 아파트입구                     (전주 북초교사거리)

- 교통사고 잦은 곳 : 덕진동 한방평원사거리, 금암광장,

삼천우안 강변로(세내교～용흥중)

○ 사업규모 : 회전교차로 설치 및 도로안전시설물 정비

○ 총사업비 : 998백만원(국 499, 시 499)

- 회전교차로 : 840백만원(국 420, 시 420)

- 교통사고 잦은곳 : 158백만원(국 79, 시79)

○ 사업기간 : 2015. 1. ～2015. 11.

※ 도로교통공단, 경찰서 협의 선정 지역(국민안전처 지역개발특별회계)

□ 추진상황

○ 중인삼거리 회전교차로 공사 착공 --------------- 2015. 6. 12.

○ 교통사고 잦은 곳 공사 착공 -------------------- 2015. 6. 15.

□ 금후계획

○ 공사 완료-------------------------------------- 2015. 11.

외곽지역 및 우범지역 가로등 설치

○ 관내 외곽지역 및 우범지역에 가로등을 설치하여 밝은 밤거리

조성으로 우범지대 제로화

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주-군산 도로 전주 진입주변, 반월삼거리 ~ 전주I.C 간

○ 사업규모 : 가로등 신설 20등

○ 총사업비 : 100백만원

○ 사업기간 : 2015. 1. ∼ 2015. 6.

□ 추진상황

○ 가로등 설치 : 24등

- 도도교차로 : 4등  /  쪽구름로 : 12등

- 모  악  로 : 4등  /  성 덕 로 :  4등

	◀ 연도별 추진상황 ▶
○ 동부대로(아중역) 및 미산초등학교(전미동) 부근 59등 -- 2012. ○ 기린로변 98등 ------------------------------------- 2013. ○ 견훤로 외 2개소 40등 ------------------------------ 2014.

○ 현장조사 및 실시설계 -------------------------- 2015. 3.

○ 공사 착수 --------------------------------------- 2015. 4.

○ 공사 완료 --------------------------------------- 2015. 6.

북부권 국도대체우회도로 건설(용정∼용진)

○ 시가지 통과 국도(17, 27호선) 교통량 분산으로 시내권 교통정체 해소

○ 북동부지역 지역개발 촉진 및 광역도시 발전 기반 구축

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 용정동∼완주군 용진면 용흥리(국도26호선)

○ 사업기간 : 2006년∼2016년(11개년)

○ 사 업 비 : 2,883억원(국 2,620, 시비 263 - 편입토지 보상)

- 기 투 자 : 2,618억원(국비 2,355, 시비 263)

- 2015년도 :   146억원(국비)   - 이후계획 : 119억원(국비)

○ 사업규모 : 연장 11.23㎞, 폭 20.0m(전주시 8.4㎞)

편입용지(전주시 - 570필지 465,811㎡)

○ 시행기관 : 국토교통부(익산국토관리청)

□ 추진상황(공정율 95%)

○ 실시설계 용역 ----------------------------------- 2005. 12.

○ 공 사 착 공 ------------------------------------- 2006.  6.

○ 편입토지 보상완료 ------------------------------- 2015.  4.

※ 일부구간(용정∼반월교차로, 연장 3.2㎞) 개통 : 2015. 02.

□ 금후계획

○ 신미산 교차로 완료 ------------------------------ 2016.  6.

○ 공 사 완 료 -------------------------------------- 2016. 12.

※ 2016년도 국가예산 확보 공사 마무리 : 119억원(익산국토관리청)

북부권 국도대체우회도로 건설(용진∼우아)

○ 시가지 통과 국도(17, 27호선) 교통량 분산으로 시내권 교통정체 해소

○ 북부권 국도대체우회도로(용정～용진) 1단계 사업과 연결 사업으로

북부권 우회 교통망 완성

□ 사업개요

○ 위    치 : 완주군 용진면 용흥리∼완산구 색장동(국도 17호선)

○ 사업기간 : 2013년∼2020년(8개년)

○ 사 업 비 : 2,235억원(국비 1,935, 시비 300 - 편입용지 보상)

- 기 투 자 : 5억원(국비)        - 2015년도 :  31억원(국비)

- 이후계획 : 2,199억원(국비 1,899, 시비 300)

○ 사업규모 : 연장 11.7㎞(전주시 구간 6.1㎞), 폭 20m

○ 시행기관 : 국토교통부(익산국토관리청)

□ 추진상황

○ 도로구역 결정고시 ------------------------------- 2008. 10.

○ 예비 타당성조사 용역 ---------------------------- 2011. 12.

○ 실시설계 보완 용역 착수 ------------------------- 2014.  5.

□ 쟁점사항 및 대책

○ 백자마을 주민 및 동전주 구세군교회 측 변전소 뒤쪽으로 노선변경 요청

○ 원색장 주민들은 당초 설계(2006년) 노선대로 동부우회도로 접속요청

□ 주민 의견사항이 반영될 수 있도록 노선계획 재검토 수립 건의

□ 금후계획

○ 실시설계용역 완료 ------------------------------  2015.  9.

○ 공 사 착 공(익산국토관리청) --------------------  2015. 12.

○ 편입토지 보상추진(전주시) ----------------------  2016.  3.

○ 준 공 예 정 -------------------------------------  2020. 12.

새만금∼전주간 고속도로 건설

○ 새만금에서 전주까지 동서축을 잇는 고속형 직통도로 건설

○ 동서 간 교통체계를 개선하고, 동서지역의 통합적 발전에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 새만금 ∼ 김제 ∼ 전주

○ 사업기간 : 2010년∼2020년(11개년)

○ 사 업 비 : 18,348억원 (새만금∼전주)

- 기 투 자 : 367억원              - 이후계획 : 17,981억원

○ 사업규모 : 연장 55.8km(새만금∼전주)

○ 시행기관 : 국토교통부(한국도로공사)

□ 추진상황

○ 국가기간 교통망 수정계획 반영 ------------------ 2007. 11.

○ 타당성조사 용역 -------------------------------- 2012.  3.

○ 기본설계 용역 ---------------------------------- 2014. 11.

○ 실시설계 용역 착수 ----------------------------- 2015.  5.

□ 쟁점사항 및 대책

○ 중인동, 은석마을 주민 노선변경을 요망하는 집단민원 발생

(이서교차로∼호남고속도로∼익산장수 간 고속도로 활용 요구)

□ 한국도로공사와 협의 최적의 노선 선정으로 민원 최소화 노력

□ 금후계획

○ 실시설계 용역 완료 ------------------------------ 2016. 12.

○ 공 사 착 공 -------------------------------------  2017.  6.

○ 공 사 완 료 -------------------------------------  2020. 12.