제346회 전주시의회 제2차 정례회 2017년도 행정사무감사특별위원회

2017년도

주요업무 추진상황 보고

시민안전담당관

보  고  순  서

□	일 반 현 황	-------	1
□	팀 별 주 요 기 능	-------	2
□	기 본 현 황	-------	3
□	주요업무 추진상황	-------	5

일  반  현  황

□ 기    구 : 4 담 당

				시민안전담당관
안전총괄				안전관리				재난방재				민방위

□ 정․현원

구 분	총 계	일 반 직					기능	비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	18	1	4	6	3	4
현 원	18	1	4	8	4	1

팀별 주요기능

팀별	분 장 사 무
안전총괄	○ 안전정책 총괄, 사회재난(생활안전 포함) 업무 총괄 ○ 국제 안전도시 공인사업 ○ 특정관리대상 시설물 관리, 재난관리 자원 조사 ○ 재난대비 훈련(안전한국훈련 등) ○ 안전문화운동, 민간 예찰단 운영, 앱 신고, 재난안전교육 ○ 안전관리계획수립, 사망자수 감축 목표 관리제 ○ 재난시설물 안전점검, 어린이놀이시설 안전점검, 국가안전대진단 ○ 특별사법 경찰활동 총괄 ○ 안전관리자문단 운영 및 관리
안전관리	○ CCTV 설치 및 운영관리 ○ CCTV 통합관제센터 운영 및 관리 ○ 승강기 유지관리 및 안전관리 업무
재난방재	○ 자연재난 업무 총괄 ○ 재난안전대책본부, 재난상황실 운영, 재난관리시스템 운용 ○ 재난관리기금 관리 및 집행 ○ 재해위험지구 지정 및 관리, 사업추진 ○ 재난예·경보 시설 관리, 재난대비 자원조사 ○ 풍수해저감 종합계획 수립, 재해대책 평가, 재해복구계획수립 ○ 재해 예방사업 추진(공사, 보상 등) ○ 지역자율방재단 운영, 풍수해보험 ○ 수상레저업 등록 및 유·도선 업무
민 방 위	○ 민방위교육, 인력동원, 민방위시설 및 장비 관리 ○ 을지연습, 충무계획 수립, 화랑훈련 등 ○ 통합방위협의회의 개최, 중점관리대상 자원 확인의 날 행사 ○ 사회복무요원 배치 및 지도 ○ 비상대비 계획수립 및 비상훈련, 예비군 육성자금 지원 등

기  본  현  황

□ 특정관리대상 시설물

(단위: 개소)

합계	시 설 물					건 축 물
	소계	도로 시설	토목공사장등	유원시설	기타	소계	공 동 주 택	다 중 이 용 시 설	지 방 공 공 청 사	대 형 광고물	대 형 건축물	대형공사장	기타
1,820	58	56	0	2	0	1,762	1,302	328	23	53	53	1	2

□ 재해위험지구 지정현황

지구명	위 치	면적(㎡)	유형	위험등급	지정고시일 (해제고시일)	비고
어은	진북동 어은,도토리골 일원	416,900	침수위험	가	2010. 2. 26.	’15.9.21. 착공
진기들	전미동2가 1615-1번지 일원	3,633,400	침수위험	가	2010. 2. 26.	’16.1.19. 착공
야전	팔복동1가 일원	1,560,000	침수위험	가	2010. 4. 1.	’14.6.30. 착공
덕적 (해제)	평화동2가 714-9번지 일원	208,000	침수위험	가	2010.4.1. (2014.9.3.)	사업완료
색장 (해제)	색장동 은석교 앞 절개지(춘향로 ~ 국도17호선)	8,000	붕괴위험	가	2010.11.15. (2014.9.3.)	사업완료
원당	완산구 대성동 1030-79번지 일원	72,500	침수위험	나	2015. 9. 4.
중인	완산구 중인동 207-3번지 일원	304,000	침수위험	나	2015. 9. 4.
금상	덕진구 금상동 1280-4번지 일원	412,000	침수위험	나	2015. 9. 4.
송천1	덕진구 송천동2가 417번지 일원	213,200	침수위험	나	2015. 9. 4.	‘16.4.25우수저류시설 기본 및 실시설계 중
호성1	덕진구 호성동2가 78-4번지 일원	117,000	침수위험	나	2015. 9. 4.
월평	덕진구 전미동2가 1475번지 일원	305,476	침수위험	나	2017. 7. 28.

□ 어린이보호 및 방범용CCTV 설치 현황

총 계		방범용 CCTV		어린이보호구역 CCTV		어린이공원 CCTV		비고
개소	대수	개소	대수	개소	대수	개소	대수
998	2,257	545	1,203	269	656	184	398

□ 예·경보시설 현황

(단위: 개소)

합계	재해문자전광판	재난감시 CCTV	자동음성 통보	우량관측시설	수위관측시설
26	2	10	3	7	4

□ 민방위 시설

(단위: 개소)

합계	민방공대피소	경보시설	비상급수시설	비 고
302	208	18	76

□ 어린이놀이시설

(단위: 개소)

합계	도시공원	어린이집	주택단지	식품업소	대형점포	기타
848	142	137	504	43	5	17

주요업무 추진상황

□	사회재난 대비 안전도시 조성	----	6p
□	생활 속 시민 안전문화 확산	----	7p
□	국제안전도시 공인사업	----	8p
□	방범용CCTV 설치 및 운영	----	9p
□	자연재난 대비·대응력 제고	----	10p
□	야전 재해위험지구 정비사업	----	11p
□	어은 재해위험지구 정비사업	----	12p
□	진기들 재해위험지구 정비사업	----	13p
□	전주초지구 우수저류시설 설치사업	----	14p
	매화지구 우수저류시설 설치사업	----	15p
	송천1지구 우수저류시설 설치사업	----	16p
	민방위업무 추진	----	17p

사회재난 대비 안전도시 조성

○ 안전한 전주 만들기를 위하여 재난위험시설물 안전점검 및 보수보강 등을 실시하여 시민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

○ 재난상황실 운영 : 24시간 비상근무(1인) 및 비상단계별(4단계) 근무

○ 재난상황의 신속한 대처를 위한 단계적 대응계획 수립·추진

- 안전관리계획 수립 및 표준행동 매뉴얼 정비

○ 어린이놀이시설 안전관리시스템 구축(QR코드이용 스마트 안전관리시스템)

- 사업대상 : 833개소(주택단지 497,어린이집 140,도시공원 140, 음식점 37, 기타19)

- 사 업 비: 67백만원(시스템구축 20, QR코드 47)

○ 재난위험 시설물 안전점검 강화

- 대상시설 : 특정관리대상시설, 지역축제 행사장, 민간다중이용시설 등

- 사업내용 : 재난위험요인 등을 점검하고, 보수·보강 등의 안전조치 실시

□ 추진상황

○ 2017년도 전주시 안전관리 계획 수립(3개분야 28개 유형)	’17. 03.

○ 재난대응 행동조치 매뉴얼 재정비(21개 유형)	’17.  06.

○ 상반기 특정관리대상시설 안전점검(1,831개소)	’17.  06.

○ 어린이놀이시설 안전관리시스템 및 QR코드 설치 완료	’17. 09.

○ 안전도시 조성을 위한 시설물 점검	연중

- 국가 안전대진단 추진(2,138개소 점검)               : ’17. 02. ~ 03.

- 지역축제장 안전관리계획 심의 및 민·관합동 안전점검(국제영화제 등)  :  15회

- 해빙기, 명절 등 취약시기별 재난위험시설물 안전점검         :  6회

○ 재난대응 행동조치 매뉴얼 교육(13개 협업부서)	’17.  10.

○ 하반기 특정관리대상시설 안전점검	’17. 10.

□ 금후계획

○ 어린이놀이시설 안전관리 지속점검 강화	연중

○ 다중이용시설 등 민간부문 안전점검 지원	연중

○ 월동기 안전점검 및 국가안전대진단 운영	’17. 11. ~ ’18. 3

생활 속 시민 안전문화 확산

○ 안전의식 제고를 위한 효과적인 안전교육·훈련 및 홍보 실시로 시민과      함께하는 생활 안전문화 여건 조성 및 확산

□ 사업개요

○ 재난·재해 대비 및 대응역량 강화 : 재난·안전교육 및 훈련 등

○ 시민의 자발적 참여를 통한 위험지역 예찰 활동 및 안전신고 활성화

○ 생활 속 안전문화 정착을 위한 대시민 안전문화 홍보

□ 추진상황

○ 재해재난대비 유관기관 합동현장훈련 실시

- 풍수해 대비 자체현장훈련 실시(전주천)	’17. 06.

- 재난대비 소방서 합동훈련 실시(연수요양병원)	’17. 06.

- 대규모 지진 대비 현장훈련 실시(한국국토정보공사)	’17. 11.

○ 찾아가는 생활안전 교육 실시

- 안전취약계층방문 생활안전교육(20회/350명)	’17. 04.~10.

- 민간예찰단 재난안전체험교육(30명/임실119안전센터)	’17. 06.

○「전주시 안전관리 민관협력위원회」 조례제정	’17. 05.

○ 안전문화 확산을 위한 안전점검의 날 운영 등 캠페인활동 실시 (10회, 557명)

○ 안전신문고 신고활성화로 생활 속 위해요소 사전제거

- 신고건수 : 3,031건(처리건수: 2,689건)

○ 전주시 365 생활안전 모니터단 발대식 및 간담회 개최	’17. 07.~ 08.

□ 금후계획

○ 취약계층대상 생활안전 교육(사회복지시설 등)	5회

○ 대시민 안전문화 확산을 위한「안전점검의 날」운영	월 1회

○ 전주시 생활안전 모니터단 운영	연중

○ 안전신문고 앱 홍보 강화를 통한 시민들의 안전위해요소 신고 활성화	연중

국제안전도시 공인사업

○ 국제기준에 맞는 안전증진사업 지속 추진으로 안전 환경을 제공하여       시민이 안전하고 행복한 전주 구현

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015. 4. ∼ 2018. 2.

○ 사 업 비 : 104백만원(2017년)

○ 사업내용 : 국제안전도시 공인(협약, 공인조건 추진, 공인 신청)

- 안전도시 만들기 기본조사 연구용역

- 상호 협력기반 마련(조례 제정, 위원회 구성)

- 공인조건 프로그램 운영, 수행과정 및 효과 평가 등

□ 추진상황

○ 국제안전도시 만들기 기본조사 연구용역 추진	’15. 04. ~ ’16. 02.

○ 안전도시 조례 제정	’15. 08. 18.

○ 국제안전도시 공인사업 기본계획 수립	’16. 03. 31.

○ 국제안전도시 7가지 공인기준별 추진계획 수립	’17. 03. 20.

○ 공인 평가를 위한 손상통계자료 연구용역(백석대)	’17. 05. ~ 09.

○ 사업추진을 위한 (실무)분과위원회,추진상황 보고회 개최 등(11회)

○ 한국 네트워크 활동 및 공인 평가를 위한 자문(8회)

○ 국제안전도시 공인신청 및 1차(예비) 현지실사  실시	’17. 09. ~ 10.

□ 금후계획

○ 국제안전도시 공인2차 현지실사 평가(국,내외실사단)	’18. 02.

○ 국제안전도시 공인	’18. 03.

○ 국제안전도시 공인기준에 의한 사업 지속 추진	연 중

○ 안전도시 협의회 및 실무(분과)위원회 회의,워크숍운영	분기별

○ 국제안전도시 한국네트워크 참여	연중

방범용 CCTV 설치 및 운영

○ 취약지역 방범용 CCTV 설치로 365일 안전한 도시 구현

○ 24시간 CCTV 관제업무 수행으로 범죄 예방 및 사고 시 즉각 대응

□ 사업개요

○ 방범용 CCTV 설치

- 사 업 비 : 656백만원(시비 594, 도비 62)

- 사업규모 : 방범 CCTV 41개소 82대 설치

- 사업대상 : 방범 취약지역 및 우아2동 삼거마을 등 시 외곽 자연마을

○ 여성 범죄 예방 CCTV 설치

- 사 업 비 : 1,100백만원(국민안전처 재난수요특별교부세)

- 사업규모 : 방범 CCTV 100개소 250대 설치

- 사업대상 : 등산로 70개소 175대, 하천산책로 30개소 75대

○ CCTV 통합관제센터 운영

- 위    치 : 시청 8층, 면적 280㎡

- 사 업 비 : 1,401백만원(운영비 515, 민간이전 596, 자산취득비 290)

- 근무인원 : 21명(경찰 3, 관제요원 18) / 3조 2교대

- 관제대수 : 2,257대(방범용 1,203, 어린이보호 656, 어린이공원 398)

- 운영방법 : 민간위탁(전라보안공사)

□ 추진상황

○ 방범용 CCTV 설치장소 조사 및 주민의견 수렴	’16. 12. ~ ’17. 01.

○ 설계 및 과업지시서 작성, 일상감사	’17. 02. ~ 03.

○ 영상 저장용 스토리지 구입 설치	’17. 03. ~ 06.

○ 방범 및 여성범죄예방CCTV 설치 (129개소 317대)	’17. 04. ~ 10.

○ 마을방범CCTV 설치 (7개소 15대)	’17. 05. ~ 08.

□ 금후계획

○ 방범 및 여성범죄예방CCTV 추가설치(22개소 54대)	’17. 11. ~ 12.

○ CCTV 통합관제센터 내실 운영(관제, 경고방송 실시 등)	연중

자연재난 대비·대응력 제고

○ 사전예측을 통한 선제적 상황관리체계 운영 및 인명피해 우려지역 등 지속적 점검 및 예찰로 인명피해 최소화

□ 사업개요

○ 한 단계 빠른 상황판단 회의 운영 및 비상근무 실시

- 기상 상황에 따라 5단계(평상시, 보강단계, 비상 3단계) 상황유지

○ 재난관리기금 운용 및 재해예방사업 추진

○ 자연재난 대비 매뉴얼 수립 및 상황전파·초동대처 훈련 실시

○ 재해 취약시설 점검·정비 및 신속한 복구 지원

□ 추진상황

○ 24시간 상시 비상근무체계 구축 및 재난상황근무 강화	연중

○ 예·경보시설 통합관리시스템구축 협약체결(전주시↔K-Water)	’17. 03.

- 홍수 예·경보시설 개선 및 교체, 실시간수문관측시스템, 홍수모니터링기준수립 등

○ 자연재난 대응 매뉴얼 정비(풍수해, 지진, 대형화산폭발)	’17. 04.

○ 여름철 자연재난 대비 재난안전대책본부 운영	’17. 05. ~ 10.

○ 풍수해 대응 현장훈련(전주천 쌍다리 일원)	’17. 06.

- 훈련내용 : 전주천 범람에 따른 주민대피 및 제방보강 등

○ 재해 취약시설 점검·정비 실시 : 7회

- 정기점검: 3회(3월, 6월, 9월) / 수시점검: 4회(호우3회, 태풍1회)

○ 풍수해 보험 홍보 및 보험가입 추진(8,130건)	’17. 05. ~ 11.

□ 금후계획

○ 재난 예·경보시설 통합관리시스템 구축사업 완료	’17. 12.

○ 24시간 상시 비상근무체계 구축 및 재난상황근무 강화	연중

○ 재해 취약시설 점검·정비 및 신속한 복구지원	연중

야전 재해위험지구 정비사업

○ 집중호우 시 전주천 수위상승으로 홍수위보다 낮은 야전지구의

침수피해를 예방하여 시민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 팔복동 야전마을 일원

○ 사업규모 : 유수지 1개소, 펌프 5개소, 관로 정비 2.9km

○ 총사업비 : 29,400백만원(국 14,229, 도 5,618.2, 시 7,749.8, 특교 1,803)

- 기투자 : 25,323백만원(국  12,190, 도 4,803, 시 6,527, 특교 1,803)

- 17년도 :  4,077백만원(국   2,039, 도  815.2, 시 1,222.8)

○ 사업기간 : 2013년 ∼ 2018년 (6개년)

□ 추진상황

○ 자연재해위험지구 지정	’10. 02.

- 유형 : 침수 위험지구(가등급), 지정면적 : 1,560,000m²

○ 기본 및 실시설계용역 추진	’13. 05. ~ ’14. 10.

○ 국민안전처 사전설계 심의(2회)	’14. 01. ~ 04.

○ 행정절차이행(설계자문, 일상감사 등)	’14. 05.

○ 공사 추진(공정 75%)	’14. 06. ~

- 1~2차분 (’14~’16년) 준공 : 관로정비 L=1.9km, 펌프 2개소

- 3~4차분(’16~’18년) 추진 : 관로정비 L=1.0㎞,  펌프 3개소, 유수지 1개소

□ 금후계획

○ 공사 추진	’17. 11. ~ ’18. 05.

- 관로정비 L=0.8㎞,  펌프 2개소, 유수지 1개소(19,397㎡)

어은 재해위험지구 정비사업

○ 집중호우 시 전주천 수위상승으로 홍수위보다 낮은 어은지구의

침수피해를 예방하여 시민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 진북동 어은․도토리골 일원

○ 사업규모 : 펌프 5개소, 관로 정비 1.1㎞

○ 총사업비 : 15,300백만원(국 7,650, 도 3,060, 시 4,590)

- 기투자 : 13,500백만원(국 6,750, 도 2,700, 시 4,050)

- 17년도 :  1,800백만원(국   900, 도   360, 시   540)

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2018년 (5개년)

□ 추진상황

○ 자연재해위험지구 지정	’10. 02.

- 유형 : 침수위험지구(가등급), 지정면적 : 416,900m²

○ 기본 및 실시설계용역 추진	’14. 06. ~ ’15. 09.

○ 국민안전처 사전설계 심의	’15. 02.

○ 행정절차이행(설계경제성 검토, 설계자문 등)	’15. 03. ~ 09.

○ 공사추진(공정 75%)	’15. 09. ~

- 1차분(’15~’16년) 준공 : 관로 정비 L=0.4km, 펌프 2개소

- 2차분(’16~’18년) 추진 : 관로 정비 L=0.7km, 펌프 3개소

□ 금후계획

○ 공사 추진	’17. 11. ~ ’18. 10.

- 관로 정비 L=0.3km, 펌프 2개소

진기들 재해위험지구 정비사업

○  집중호우 시 전주천 ․ 만경강의 수위상승으로 홍수위보다 낮은

진기들 지구의 침수피해를 예방하여 시민의 생명과 재산보호

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 전미동2가 1615-1번지 일원

○ 사업규모 : 유수지 1개소, 펌프 1개소, 배수로 정비 2.1km 등

○ 총사업비 : 26,305백만원(국 13,152, 도 5,261, 시 7,892)

- 기투자 : 15,430백만원(국  7,715, 도 3,086, 시 4,629)

- 17년도 : 10,500백만원(국  5,250, 도 2,100, 시 3,150)

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2018년 (5개년)

□ 추진상황

○ 자연재해위험지구 지정 및 관리	’10. 02.

- 유형 : 침수위험지구(가등급), 지정면적 : 3,633,400㎡

○ 기본 및 실시설계용역 추진	’14. 06. ~ ’15. 06.

○ 사전설계 심의(국민안전처)	’15. 07

○ 행정절차이행(설계자문, 계약심의 등)	’15. 10. ~ 11.

○ 공사추진(공정 45%)	’16. 1. ~

- 1차분(’16~’17년) 준공 : 유수지 1개소, 펌프장 가시설

- 2~4차분(’17~’18년) 추진 : 펌프장 건물 신축, 배수로 정비 L=2.1km

□ 금후계획

○ 공사 추진	’17. 11. ~ ’18. 11.

- 배수로 정비 L=2.1km

전주초지구 우수저류시설 설치사업

○ 저지대 상습 침수지역을 홍수 피해로부터 예방하고, 저류된 빗물을

대체 수자원으로 활용하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 :  완산구 태평동 210-2번지 일원

○ 사업규모 : 저류시설 6,800㎥,  펌프 1개소, 관로 정비 0.5km

○ 총사업비 : 12,450백만원(국 6,225, 도 1,867, 시 4,358)

- 기투자 :  3,800백만원(국 1,900, 도   570, 시 1,330)

- 17년도 :  8,650백만원(국 4,325, 도 1,298, 시 3,027)

○ 사업기간  : 2015년 ∼ 2018년 (4개년)

□ 추진상황

○ 우수저류시설 사업대상지 제출 및 심의ㆍ선정	’14. 04. ~ 10.

○ 우수저류시설 사업계획 수립 및 추진방향 검토	’15. 01. ~ 04.

○ 기본설계용역 완료	’15. 06. ~ ’15. 11.

○ 실시설계용역 완료	’16. 04. ~ ’17. 06.

○ 행정안전부 사전설계검토(2회)	’17. 01. / ’17. 05.

○ 행정절차이행(설계자문, 계약심의 등)	’17. 07. ~ ’17. 09.

□ 금후계획

○ 공사착공	’17. 11.

○ 공사 추진	’17. 11. ~ ’18. 12.

- 우수저류시설 1개소(6,800㎥), 펌프 1개소, 관로 정비 L=0.5km

매화지구 우수저류시설 설치사업

○ 저지대 상습 침수지역을 홍수 피해로부터 예방하고, 저류된 빗물을

대체 수자원으로 활용하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 팔복동2가 94-2번지 일원

○  사업규모  : 저류시설 13,200㎥,  펌프 1개소, 관로정비 1.1km 등

○ 총사업비 : 15,600백만원(국 7,800, 도 2,340, 시 5,460)

- 기투자  :  4,800백만원(국 2,400, 도   720, 시 1,680)

- 17년도 : 10,800백만원(국 5,400, 도 1,620, 시 3,780)

○ 사업기간 : 2015년 ∼ 2018년 (4개년)

□ 추진상황

○ 우수저류시설 사업대상지 제출 및 심의ㆍ선정	’14. 04. ~ 10.

○ 우수저류시설 사업계획 수립 및 추진방향 검토	’15. 01. ~ 04.

○ 기본설계용역 완료	’15. 06. ~ ’15. 12.

○ 실시설계용역 완료	’16. 04. ~ ’17. 06.

○ 행정안전부 사전설계검토	’17. 01.

○ 행정절차이행(설계자문, 계약심의 등)	’17. 02. ~ ’17. 05.

○ 편입토지 감정평가 및 보상협의	’17. 05. ~

- 보상대상 22필지중 9필지 보상 완료

□ 금후계획

○ 토지수용 신청 및 보상금 공탁	’17. 11. ~ ’18. 01.

○ 공사 추진	’17. 11. ~ ’18. 12.

- 우수저류시설 1개소(13,200㎥), 펌프 1개소, 관로 정비 L=1.1km

송천1지구 우수저류시설 설치사업

○ 저지대 상습 침수지역을 홍수 피해로부터 예방하고, 저류된 빗물을

대체 수자원으로 활용하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동2가 597-4번지 일원

○ 사업규모  : 저류시설 18,500㎥, 펌프 1개소, 관로 정비 0.7km

○ 총사업비 : 17,000백만원(국 8,500, 도 2,550, 시 5,950)

- 기투자 :  1,000백만원(국   500, 도    150,  시    350)

- 17년도 :  7,932백만원(국 3,966, 도 1,190, 시   2,776)

○ 사업기간 : 2016년 ∼ 2018년 (3개년)

□ 추진상황

○ 우수저류시설 신규 사업대상지 신청	’15. 04.

○ 우수저류시설 신규 사업대상지 선정 심의(행정안전부)	’15. 10.

○ 신규사업 선정 및 국비 확정 통보	’15. 12.

○ 기본․실시설계 용역 착수(공정 70%)	’16. 04. ~

○ 총사업비 변경 관련 행정안전부 협의	’16. 10. ~  ’17. 06.

- 저류조 위치 및 관로 정비구간 변경 발생

□ 금후계획

○ 행정안전부 사전설계검토	’17. 11.

○ 행정절차이행(설계자문, 계약심의 등)	’17. 11. ~ ’17. 12.

○ 편입토지 감정평가 및 보상협의	’17. 12. ~

○ 공사 추진	’18. 02. ~ ’18. 12.

- 우수저류시설 1개소(18,500㎥), 펌프 1개소, 관로 정비 L=0.7km

민방위업무 추진

○ 전시 또는 이에 준하는 비상사태 발생 등 언제 일어날지 모르는

위협으로부터 국민의 생명과 재산을 보호하고자 함

□ 사업개요

○ 전시 대비 충무계획 수립 : 총괄 실시계획, 인력동원 실시계획

○ 민방위 편성(20~40세 남자) : 39,350명

- 1~4년차 16,615명, 5년차 이상 22,735명   *’17. 10월 기준

○ 을지연습 추진 : ’17. 8. 21 ∼ 8. 24 (3박4일)

○ 통합방위협의회의 개최 : 연 4회(분기별 실시)

○ 민방위 시설․장비 점검 및 정비

- 대피시설 208개소, 경보시설 18개소, 급수시설 76개소

○ 재난안전 경보방송시설 구축 및 노후 위성수신기 교체(48백만원)

- 장  소 : 송천도서관, 인후2동주민센터, 전주시 교통정보센터

□ 추진상황

○ 2017년도 충무계획 수립	’17. 02.

○ 통합방위협의 회의 개최(3회)	’17. 03. / 06. / 08.

○ 2017년 을지연습 실시	’17. 08.

○ 중점관리자원 확인의 날 개최(2회)	’17. 03. / 09.

○ 지역특성화훈련 실시 (2회)	’17. 03. / 09.

○ 2017년 민방위 교육 실시(39회)	’17. 04. ~ 10.

* 직장인 등의 편의를 위한 주말교육 연 1회 실시

○ 경보시설 노후 위성수신기 교체(2개소)	’17. 06.

○ 경보방송시설 구축(1개소)	’17. 08.

□ 금후계획

○ 지역특성화훈련 실시 (1회)	’17. 11.

* 안전한국훈련과 연계하여 지진대피훈련 등 실시

○ 민방위 주민대피시설 비상구급함 구입 및 보급	’17. 11.

○ 민방위시설장비 점검	’17. 11. ~ 12.

- 정기점검 : 1회(’17. 11.) / 일제점검 : 1회(’17. 12.)

○ 통합방위협의 회의 개최(1회)	’17. 12.