제352회 전주시의회 임시회 복 지 환 경 위 원 회

2018년도

주요업무 추진상황 보고

맑은물사업본부

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 금후계획
	○	수 도 행 정 과	-------	5
	○	급 수 과	-------	10
	○	수 질 관 리 과	-------	17
	○	하 수 과	-------	22

일  반  현  황

□ 기   구 : 4과 15팀

									맑은물사업본부
	수도행정과 (4팀)							급 수 과 (4팀)								수질관리과 (3팀)								하 수 과 (4팀)
	수도행정							맑은물공급								수질관리								하수행정
	완산요금							급수시설								수질분석								하수시설
	덕진요금							누수방지								시설관리								하수정비
	체납징수							계량기관리																지하수관리

※ 서신통합센터, 누수신고센터, 계량기시험소, 사업장 15개소(취수장 1, 배수지 10, 정수장 1, 가압장 3)

□ 정원‧현원

부서별 직렬별		정 원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과	하 수 과
합 계		86	86	20	23	28	15
일 반 직	소계	83	82	20	23	24	15
	4급	1	1	1
	5급	4	4	1	1	1	1
	6급	23	27	5	7	10	5
	7급	28	33	11	6	10	6
	8급	15	8	2	4	-	2
	9급	12	9	-	5	3	1
연 구 직		3	4			4

※ 공무직 36명 (수도행정과 13, 급수과 19, 수질관리과 2, 하수과 2), 청경 7명 (수질관리과) 부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
수도행정과	○ 맑은물사업본부 운영 총괄 ○ 상수도공기업 특별회계 운영 ○ 공사 및 용역 계약, 물품관리 ○ 상수도요금 인상 및 관련조례 개정 ○ 검침업무 운영 및 관리 ○ 상하수도요금 과징업무 전반
급 수 과	○ 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 ○ 상수도 중장기계획 수립․시행 ○ 비상급수계획 및 대책수립 총괄 ○ 급수공사, 상수도 증설 및 확장공사 ○ 마을상수도 유지관리업무 ○ 누수탐사 및 누수복구업무, 누수방지대책 수립 ○ 누수신고센터 운영관리 ○ 급수중지․개전․폐전에 따른 계량기 관리 ○ 고장․노후계량기 교체관리 ○ 계량기시험소 운영관리
수질관리과	○ 생활용수 공급 및 공업용수 생산․공급 ○ 광역상수도 수요에 따른 수급조절 및 관리 ○ 각 사업장 구축물․건물 유지보수 및 안전관리 ○ 국가공인수질검사기관 적정운영 및 정도관리 ○ 먹는물 공동시설(약수터) 및 마을상수도 수질검사 ○ 상수도 원․정수 수질관리 및 보전 ○ 상수원보호구역 관리
하 수 과	○ 하수도정비 기본계획(변경) 수립 ○ 하수도공기업 특별회계 운영 ○ 효율적인 지하수 및 빗물이용 관리 ○ 하수관로 정비사업 ○ 하수관로정비 민간투자(BTL)사업 유지관리 ○ 마을하수도 시설 및 유지관리 ○ 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리

기  본  현  황

(2018. 6월말 기준)

□ 급수현황

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유수율 (%)	급수량(천㎥/일)
						계	생활 용수	공업 용수
651,622	649,016	99.6	342.9	236,732	78.3	265	230	35

□ 상수도관

(단위 : ㎞)

총 연 장	도․송수관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,430	64	863	1,503

□ 상수원 보호구역

구 분	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎡)	상류(m)	하류(m)		안내판	표주
계	614,111	1,500	800		16	50
방수리	284,775	1,000	500	’72. 5. 5.	8	26
전 미	329,336	500	300	’67. 8. 5.	8	24

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

□ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)
계		202.5	2,062	1,838	224	89.1
합 류 식			658	446	212
분류식	소 계	202.5	1,404	1,392	12
	오수관거		877	877	0
	우수관거		527	515	12

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	환기구 (개소)	우수토실 (개소)	여수토실 (개소)
계	88.9	1,010	73	251	5
전주천 (좌, 우안)	25.3	369	37	142	4
삼 천 (좌, 우안)	12.3	155	18	45
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	9	38
아 중 선	12.0	174	4	16
팔복선(공장,생활)	16.9	183	5	8	1
상 관 선	10.4	47		2
기타(구화천,태평로, 연화천,덕적천,중복천)	7.6

□ 하수․위생처리 시설

구 분	환 경 사 업 소	수 질 복 원 센 터
위 치	전주시 덕진구 고내천변로 58	전주시 덕진구 중동로 150
면 적	320,990㎡	30,182㎡
시설규모 (처리용량)	규 모 : 403,000㎥/일 - 1단계 : 113,000㎥ (1990년) - 2단계 : 190,000㎥ (1997년) - 3단계 : 100,000㎥ (2005년)	규 모 : 16,500㎥/일 (2015년)
부대시설	° 위생처리장(290㎘/일) : 2002년 ° 총인처리시설(403,000㎥/일) : 2015년 ° CSOs처리시설(130,000㎥/일) : 2015년

수도행정과 소관

□	수요자 중심 상수도 사전 문자알림 서비스제공	----	6
□	옥외 화상검침기 설치 확대 운영	----	7
□	체계적인 요금 부과를 위한 자료 일제정비	----	8
□	체납 상하수도요금 징수율 제고	----	9

수요자 중심 상수도 사전 문자알림 서비스제공

상수도 체납 단수 및 누수 등 민원발생 요인 사전 문자알림 서비스를 통해 주민 편익 및 신뢰받는 수도행정 서비스 구현

□ 사업개요

○ 대   상

- 누수 및 과다 사용 수용가

‣ 상수도 월 30㎥ 이상 사용 수용가 중 평소사용량 보다 2배 이상사용 수용가

- 상수도요금 체납자 중 단수 예정 수용가

- 0톤 수용가

○ 내   용 : 누수 및 과다사용량, 사용료 체납 단수 예고 등

○ 예고방법

- 1차 :「빨간 신호등이 켜졌습니다」예고장 부착 및 계고장 부착

- 2차 : 휴대폰 문자서비스 안내

□ 추진상황

○ 수돗물 예고장 작성(빨간 신호등이 켜졌습니다)   : 1월 ∼

○ 수돗물 과다 사용(전월 대비 30% 이상) 수용가 예고  : 12,800건

○ 체납 단수 예고 계고장 부착                        : 42,000건

□ 금후계획

○ 전월대비 30% 이상 과다사용 수용가 예고장 부착 지속 추진

○ 수돗물 과소(0톤) 수용가 일제 점검              : 7. ∼ 9월

- 3개월 이상 0톤 수용가 원인분석 후 요금추징, 폐전, 중지 등 조치

옥외 화상검침기 설치 확대 운영

계량기 설치 위치 부적절 등으로 인한 검침곤란 상수도 수용가에 옥외 화상검침기를 설치하여 정확한 검침으로 상수도요금 부과체계의 신뢰성 확보

□ 사업개요

○ 기    간 : 2018. 1. ∼ 12월 (12개월)

○ 사 업 비 : 40백만원(시비)

○ 대    상 : 일반주택 및 공동주택 주계량기 (약 200개소)

- 철판, 주철관 등 무거운 것으로 덮여 있는 장소

- 지하실, 화장실, 집안 주방 등 위치가 부적절한 장소

- 맨홀, 화단, 도로변 등 검침이 어려운 장소

○ 방    법 : 위탁검침원의 검침곤란 계량기 실태조사

○ 사업내용 : 검침곤란 수용가 화상검침기 설치

□ 추진상황

○ 검침이 곤란한 대상지 실태 조사                    : 4월

○ 1차분 설치를 위한 현지실사 및 최종 대상지 선정    : 5월

- 102개소 (완산: 52개소, 덕진: 50개소)

○ 업체 선정 및 계약                                 : 6월

□ 금후계획

○ 1차분 화상검침기 설치(102개)                : 6. ∼ 7월

○ 2차분 화상검침기 대상지 현지실사 및 선정   : 9월

○ 2차분 화상검침기 설치(98개)                 : 10. ∼ 11월

체계적인 요금 부과를 위한 자료 일제정비

수도계량기 검침 설비 구축과 수용가 부과자료 정비 철저로 정확한    상하수도 요금을 부과하여 체계적이고 신뢰받는 수도행정 구현

□ 현    황

○ 검침전수 : 236,732전 (일반주택 77,563, 공동주택 159,169)

○ 검 침 원 : 173명(일반주택 73, 공동주택 100)

○ 기준요금 : 1,120원/㎥(상수도 720, 하수도 400 / 가정용 기준 20㎥ 이하)

○ 부과현황 (2018. 6. 30. 기준)

(단위 : 백만원 / 건)

구 분	합 계	가정용	일반용	대중탕용	공업용
계	61,979 271만	27,756 241만	25,757 28만	1,091 956	7,373 664
상수도	33,056 140만	18,179 124만	12,566 15만	379 339	1,930 127
하수도	28,923 131만	9,577 117만	13,191 13만	712 617	5,443 537

※ 월 평균 부과액 : 10,329백만원

□ 추진상황

○ 수용가 명의 및 도로명 주소 변경

- 전수조사를 위한 조사자 교육 및 현장조사     : 2. ∼ 5월

- 수용가 명의변경 등 전산자료 정비            : 6. ∼ 8월

□ 금후계획

○ 수용가 명의 및 도로명 주소 변경 지속 추진    : 연중

○ 계량기 이설 필요지역 일제조사                : 8. ∼  9월

체납 상하수도 요금 징수율 제고

체납자에 대한 상시독려, 단수계고, 정수처분을 통한 체납요금 조기징수와

자진납부 의식을 제고하고 상습․고액체납자 징수 강화로 안정적인 세입확보

□ 과징현황 (2018. 6 30. 기준)

(단위 : 백만원)

구 분		조정액	징수액	결 손	체납액	징수율(%)
합 계		64,907	62,026		2,881	95.56
상수도	계	34,662	33,082		1,580	95.44
	현년도	33,056	31,827		1,229	96.28
	과년도	1,606	1,255		351	78.14
하수도	계	30,245	28,944		1,301	95.69
	현년도	28,926	27,996		930	96.78
	과년도	1,319	948		371	71.87

□ 추진상황

○ 체납 상하수도사용료 특별징수기간 운영 : 2회 (3월, 6월)

- 징수액 2,203백만원(목표 2,200백만원 대비 101% 달성)

○ 체납수용가 단수계고 : 6,000전 42,000건 435백만원

○ 정수처분 및 해제 : 단수 995건 313백만원(개전 858건 259백만원)

○ 올빼미 야간 체납징수반 운영(월1회) : 92세대 926건 20백만원 징수

○ 고액체납자 재산조회 및 재산압류 추진 : 2명 5백만원

□ 금후계획

○ 하반기 체납액 특별 징수기간 운영 : 2018. 9. ∼ 12월(2회)

○ 1백만원 이상 고질체납자 부동산, 예금 등 각종 재산 압류추진

○ 올빼미 체납 상수도요금 야간 징수반 운영 : 월 1회

○ 상습·고액체납자 급수정지(단수) 계고장 송달 : 분기별 1회

○ 상하수도 장기체납 다량수용가 집중관리

- 다세대(가구)주택, 음식점, 목욕탕업, 집합상가 등

급 수 과  소 관

□	맑은물공급사업(노후상수관망 정비) 2단계	----	11
□	송천동 급수구역 조정공사	----	12
□	소규모 배수관 포설공사	----	13
□	덕진구 변방동(화전동) 노후관 교체공사	----	14
□	노후 상수도 관세척 공사	----	15
□	노후 및 고장계량기 교체사업	----	16

맑은물공급사업(노후상수관망 정비) 2단계

○ 맑은물공급사업(1단계) 추진으로 정비된 50개 블록 유수율은 87%정도이나  미 정비된 89개 블록은 유수율이 69%로 여전히 저조(전국 평균 84%)

○ 우선 순위(89개 블록)를 정하여 연차적 노후 상수관망 정비로 유수율 향상

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017. ∼ 2024년(8년간)

○ 위    치：미정비 89개 블록(1단계 사업제외 11개, 2단계 78개)

○ 총사업비 : 1,200억원(시비)

- 2018년 예산 : 110억원(본예산 100, 이월예산 10)

○ 사업규모：노후 상수관로 개량 560km

- 2단계 1차분 : 노후 상수관로 개량 36.2km(7개 블록/6개동)

(효자1·2동, 중화산1동, 삼천1동, 완산동, 평화동 일부)

- 2단계 2차분 : 1단계 제외 블록 고립(11개 블록) 및 노후관 교체(6개 블록)

(금남동, 우아동, 인후동, 호성동, 덕진동 일부)

□ 추진상황

○ 중기지방재정계획 수립(89개 블록)                  : 2015. 12월

○ 2단계 1차분 공사 및 건설사업관리용역 착공        : 2017. 6월

○ 2단계 2차분 기본 및 실시설계용역 착공            : 2017. 12월

○ 2단계 2차분 기본 및 실시설계용역 경제성(VE) 검토  : 2018. 6월

□ 금후계획

○ 2단계 1차분 공사 준공                   : 2018. 12월

○ 2단계 2차분 공사 추진 및 준공            : 2018. 8. ∼ 2019. 12월

○ 연차별 사업계획 수립 및 잔여 구간 공사 추진(65개 블록) : 2019. ∼ 2024년

송천동 급수구역 조정공사

에코시티지구 수돗물 수요량 증가에 대비하고 송천동 출수 불량지역

민원해결을 위하여 급수구역을 조정 공급

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 송천동 급수구역 조정공사

○ 위    치 : 호성동 차량등록과 교차로, 송천동 대송장례식장 앞

○ 사 업 비 : 550백만원(시비)

○ 사업규모 : 상수도관 신설 D500∼700㎜ L=177m

- 차량등록과 교차로 : D700mm L=114m

- 대송장례식장 앞 : D500mm L=63m

□ 쟁점사항 및 대책

○ 교차로 횡단 공사에 따른 교통 혼잡 및 안전 우려

□ 도로 횡단구간은 압입(지하굴진) 공법 시행 및 교통 신호수, 가시설 설치 등 안전대책 철저

□ 추진상황

○ 기본 및 실시설계용역 완료                 : 2017. 11.  8.

○ 일상감사 및 계약심사 완료                 : 2018.  1.  2.

○ 공사 착공                                 : 2018.  4.  7.

○ 공사 일시중지(자재 주문제작에 따른 지연)   : 2018.  4. 25.

○ 공사 재착공                               : 2018.  6.  4.

□ 금후계획

○ 공사 추진 및 공사 완료                    : 2018. 10월

소규모 배수관 포설공사

수돗물에 대한 신뢰도 상승으로 상수도 공급 100% 달성 추진 및

현 미급수 지역의 완전 해소로 수돗물 대시민 서비스 제고

□ 사업개요

○ 기    간 : 2018. 2. ∼ 12월

○ 사 업 비 : 1,000백만원(시비)

○ 사업규모 : 10개소,  D80∼100mm L=3,277m

○ 사업현황

(단위 : 백만원)

대 상	위 치	사업개요	사업비	비 고
합 계	10개소	D80∼100mm L=3,277m	695	*집행잔액 215
소규모 배수관포설공사		D80∼100mm L=2,992m	575
발단안길	송천동 항공대 인근	D80mm L=173m	23
삼산길	삼천동 삼산마을 인근	D80mm L=698m	111
삼례로	동산동 구중마을 인근	D80mm L=226m	50
춘향로	동서학동 원색장마을 인근	D100mm L=1,375m	301
봉암길	호성동 초포초교 뒤편	D80mm L=520m	90
관말 연결 공사		D100mm L=285m	40
곡천길	조촌동 곡천마을 인근	D100mm L=168m	23
용신길	조촌동 서당마을 인근	D100mm L=117m	17
가압장 설치 공사		가압펌프 설치 1식	43
내원당마을	대성동 내원당마을 인근	2대, H=40m, 2.2kw	20
색장마을	색장동 색장마을 인근	2대, H=30m, 0.9kw	15
추동마을	원당동 추동마을 인근	2대, H=30m, 0.9kw	14
우아동3가 등 사유지이설		7개소	37

□ 추진상황

○ 실시설계 용역 추진                        : 2018. 1. ∼ 3월

○ 도로굴착 심의 및 일상감사                 : 2018. 2. ∼ 4월

○ 공사 착공 및 준공(10개소)                   : 2018. 5. ∼ 6월

□ 금후계획

○ 집행잔액 대상지 선정 및 사업추진          : 2018. 7. ∼ 12월

덕진구 변방동(화전동) 노후관 교체 공사

덕진구 외곽지역인 화전동 신평마을 부근의 노후 및 사유지 매설

상수도관을 정비하여 안정적이며 맑고 깨끗한 물을 공급하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 1. ∼ 2018. 12월

○ 위    치 : 덕진구 화전동 신평마을

○ 사 업 비 : 400백만원(시비)

○ 사업규모 : 노후관 교체 D150mm L=820m

- 원화전마을 ∼ 신평마을(PVC/1982년도) D150mm L=820m

□ 쟁점사항 및 대책

○ 해당지역은 상수도관 노후로 잦은 누수가 발생하며, 낙후된 변방 마을로        배수관이 사유지를 관통하여 유지관리에 어려움 발생

□ 노후 상수도관을 교체하고 마을 세대별로 급수시설을 신설하여 맑고 깨끗한 물을 공급하고 이후 유지관리 철저

□ 추진상황

○ 노후관 교체공사 실시설계 용역 완료          : 2018. 1. ∼ 4월

○ 일상감사 및 계약심사 의뢰                   : 2018. 5월

□ 금후계획

○ 행정절차(일상감사, 굴착심의 등) 조치 완료   : 2018. 7. ∼  8월

○ 공사 발주 및 추진                          : 2018. 7. ∼ 10월

노후 상수도 관세척 공사

상수관 내부 피복재 탈락(이물질)에 의한 적수, 이물질 발생구간 수질저하 민원해소를 위한 노후 상수도관 세척 추진

□ 사업개요

○ 기    간 : 2018. 1. ∼ 12월

○ 위    치 : 완산구 효자동 쑥고개로 등 2개소

○ 사 업 비 : 400백만원(시비)

○ 사업규모 : 노후관 세척 D250∼400mm L= 3,706m

- 쑥고개로 D150∼300mm L= 1,712m

- 강 변 로 D300∼400mm L= 1,994m

□ 쟁점사항 및 대책

○ 상수도관 자체 노후화가 심해 다량의 적수 및 이물질 발생으로 고질적인 민원발생

□ 배수관 자체의 피복이탈구간을 세척하여 근본적인 문제를 해결하고 고질적인 수질저하 민원을 해소하고자함

□ 추진상황

○ 노후 상수도 관세척공사 실시설계 용역 완료  : 2018. 1. ∼ 4월

□ 금후계획

○ 행정절차(일상감사, 도로점용 등) 이행       : 2018. 7. ∼  8월

○ 공사 발주 및 추진                         : 2018. 7. ∼ 12월

노후 및 고장계량기 교체사업

유효기간이 만료된 노후 및 고장 난 수도계량기를 지속적으로 교체하여 상수도 행정의 신뢰성을 향상하고 수용가에 질 높은 수도서비스 제공

□ 사업개요

○ 기    간 : 2018. 1. ∼ 12월

○ 사업대상 : 유효기간 만료, 고장․동파 등으로 인한 계량기

○ 사 업 비 : 1,453백만원(시비)

○ 관련규정 : 계량에 관한 법률 시행령 제21조제1항(검정유효기간)

※ 검정유효기간 : 50mm 이하(8년), 80mm 이상(6년)

□ 추진상황

○ 상반기 계량기 교체(자체) : 7,753개

○ 상반기 계량기 교체공사 (단가계약) 시행

- 수도계량기 15㎜ 등 7종 5,738개, 사업비 185백만원

○ 계량기 조달 구입

- 소형 : 20mm외 4종 272백만원

- 대형 : 80mm외 2종 64백만원

□ 금후계획

○ 계량기 교체공사(단가계약) 단계적 시행(375백만원) : 2018. 8월 ∼

○ 계량기 구입(557백만원)                           : 2018. 8월 ∼

○ 유효기간 만료 및 고장 계량기 자체 교체(10,000개)  : 연중

○ 동절기 동파 관리 홍보                 : 2018. 12. ∼ 2019. 3월

- 기상청, 언론사, 공동주택 관리사무소, 주민센터, SNS 활용 등

수질관리과  소관

□	철저한 수질관리로 깨끗한 수돗물 공급	----	18
□	『전주얼수』홍보로 수돗물 신뢰성 제고	----	19
□	팔복정수장 배수지 증설 공사	----	20
□	상수도 노후시설 정비로 안정적 수돗물 공급	----	21

철저한 수질관리로 깨끗한 수돗물 공급

과학적이고 체계적인 수질관리 및 시민과 함께하는 직접 검증을 통한

깨끗하고 안전한 수돗물 공급

□ 사업개요

○ 상수원수부터 가정 수도꼭지수까지 단계별 수질검사 강화

- 관련규정(59개 ➞ 99개 항목)보다 강화한 수질검사 시행

○ 시민과 함께하는 수질검증으로 수돗물의 안전성 확보

- 상가 및 주택 등 현장 방문을 통한 수돗물 수질상태 조사

○ 국가공인 수질검사기관 공공성 및 신뢰성 확보를 위한 분석능력 제고

□ 추진상황

○ 용담호, 고산정수장 등 월 1회 이상 현지 점검 및 정수처리 공정 참여

○ 시민과 함께하는 수돗물 이동 상담소 운영(품질인증제, 안심확인제)    : 829개소

○ 공동주택“안전한 수돗물 인증제”수돗물 전항목 검사 및 컨설팅 : 274개소

○ 수돗물 수질민원(소독냄새, 녹물 등) 현장 방문처리 및 상담    : 35건

○ 상수도 수질 실시간 수질정보 홈페이지 공개 : 연중(배수지별 3개 항목)

○ 2018년 환경부 주관 먹는물 수질검사기관 분석능력 평가 결과 최우수 성적 달성

○ 수돗물 품질보고서 배포 및 시 홈페이지에 매월 수질정보 공개

□ 금후계획

○ 전주권 광역상수도 공급단계별(원수⇨수도꼭지수) 수질관리 지속 강화

- 원수 → 고산정수장 → 배수지(10개소) → 수도꼭지수 단계별 검증

- 배수지별 수질연속 측정장치 운영으로 실시간 수질상태 모니터링    ○ 시민과 함께하는 수질검증으로 수돗물의 안전성 확보

○ 공인검사기관 공공성 및 신뢰성 확보를 위한 분석능력 강화

- 직무연찬, 내․외부 정도관리 평가, 4,000여건/년 수질검사 추진

○ 라돈 및 과불화화합물 수질검사를 위한 분석장비 연차적 구입

『전주얼수』홍보로 수돗물 신뢰성 제고

○ 청정 1급수 용담호 상수원에서 생산된『전주얼수』를 천년전주  고유의 브랜드로 자리매김하기 위한 다양한 대시민 홍보활동 전개

○ 수돗물 음수기를 공공시설까지 확대 설치하여 안전하고 깨끗한  수돗물 마시기에 대한 시민의식 전환

□ 사업개요

○ 기    간 : 2018. 1. ∼ 12월

○ 사 업 비 : 115백만원(시비)

○ 주요내용

- 우리시의 수돗물 브랜드『전주얼수』적극적인 홍보활동 전개

- 수돗물 음수기 전주시 미설치 부서 및 다중이용 공공장소 점진적 설치

- 공공기관 및 학교 등 다양한 홍보를 통한 수돗물의 신뢰성 제고

□ 추진상황

○ 음수기 총 58대 설치 및 공공장소에 홍보게시판 12대 설치완료

○ 수돗물 홍보 공문 발송 및 팸플릿 교부

- 공공기관 홍보관 활용(농촌진흥청 과학관, 하수종말처리장 홍보실 등)

- 한옥마을 관광안내소에 수돗물 음수기 위치 표기한 관광지도 배부

○ 수돗물 음용활성화 교육 및 홍보

- 대한 주택관리사 협회 80명, 『전주얼수』사랑 주부교실 실시 70명

□ 금후계획

○ 1회용품 플라스틱 ZERO 자원순환 및 공공부문 플라스틱 감축을 위한 병입수돗물 생산 개선계획에 따라 『전주얼수』병입수돗물 생산량 감소

○ 시민과 소통 ‧ 공감하는 홍보 다양화

- 수돗물 관련 학교 등 타기관 홍보관 활용 홍보전단지 연중 배포

- 다양한 계층 수돗물 생산시설 현장견학 추진(워터투어)

팔복정수장 배수지 증설 공사

산업단지 조성 등 공업용수 수요증가에 따라 배수지를 증설하여

안정적인 용수공급으로 기업의 생산성 증대 및 산업활동 만족도에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017. 1. ∼ 2018. 12월

○ 사 업 비 : 731백만원(시비)

○ 대    상 : 공업용수 팔복정수장(덕진구 반룡2길 1-28)

∙ 시설년도 : 1989. 12. 23 / 주요시설물 8개(침전지 4, 배수지 4)

∙ 시설규모 : 70,000㎥/일 (생산량 40,000㎥/일), 배수지(4지) 11,600㎥

∙ 급수구역 : 전주 제1, 2공단 전주페이퍼 등 19개업체

○ 사업내용

- 배수지 증설 V=3,200㎥(B18m×L38m×H4.7m)

- 옹벽설치 L=49.6m  H=1.5 ~ 6.0m

□ 추진상황

○ 실시설계 일상감사 및 계약심사                : 2017.  5.  2.

○ 공 사 착 공                                  : 2017.  6. 21.

○ 공사 일시중지(지장물이설 등)                  : 2017. 10. 23.

○ 상수도 이형관 제작구입 납품                  : 2018.  2. 23.

○ 반룡마을 민원협의 및 재난 대비 북서쪽 관리도로 검토  : 2018.  3. 15.

○ 지장물(공업용수 배수관) 이설을 위한 배수관 밸브설치 : 2018.  6. 21.

□ 금후계획

○ 공사 일시중지 해제 및 재착공                 : 2018.   7월

○ 공사 준공                                    : 2018.  12월

상수도 노후시설 정비로 안정적 수돗물 공급

상수도 노후시설을 개량 ․ 정비하여 안정적 수돗물 공급과 시민불편

해소로 신뢰받는 안심 수도행정 구현

□ 사업개요

○ 기    간 : 2018. 1. ∼ 12월

○ 대    상 : 15개소 (취수장 1, 정수장 1, 배수지 10, 가압장 3)

○ 사 업 비 : 356백만원(시비)

○ 내    용

- 상수도 노후시설 정비 교체공사

□ 관로 보수, 기계설비 교체, 밸브 등 설치

- 상수도 시설물 내부청소

□ 배수지 누적된 침전물, 벽면 부착물 등 제거

□ 추진상황

○ 배수지 및 가압장 노후시설 정비 교체         : 2018. 1. ∼ 6월

- 대성배수지 부분보수공사(내부방수) 등 11건 시행

○ 상수도 시설물 내부청소                 : 2018. 4. 23 ∼ 6. 29.

- 인후배수지 등 10개소 청소완료

○ 사업장 환경정비                        : 2018. 4. 17 ∼ 6. 30.

- 대성배수지 등 12개소 제초작업

□ 금후계획

○ 배수지 및 가압장 노후시설 정비 교체공사    : 2018. 7. ∼ 11월

○ 상수도 시설물 내부청소 정기적으로 실시     : 2018. 9. ∼ 11월

하 수 과  소 관

□	생태도시 구현을 위한 하수관로 정비사업	----	23
□	중앙8분구(역사도심) 하수관로 정비사업	----	24
□	화산(1,2,6,7분구),아중(1분구) 하수관로 정비사업	----	25
□	전주 공공하수처리시설(4단계) 증설	----	26
□	농촌마을 환경개선 마을하수도 정비사업	----	27
□	체계적인 지하수 관리로 하수도 자주재원 확충	----	28
□	빗물이용시설 설치 지원 및 운영관리	----	29

생태도시 구현을 위한 하수관로 정비사업

쾌적한 생태도시 구현과 새만금 상류 수질개선에 기여하고, 오염 부하량

저감 및 불명수 감소로 인한 하수처리 경영 합리화

□ 사업개요

○ 기    간 : 2002. ∼ 2035년 (34년간)

○ 위    치 : 7개 처리구역 36분구, 6개 지구 취락지역 54마을 등

○ 총사업비 : 870,437백만원(국비 50%, 도비 10%, 시비 35%, 기금 5%)

○ 사업규모 : 하수관로 정비 1,015㎞, 배수설비 55,720개소

□ 추진상황

○ 2017년까지 완료(51.4%, 423,342백만원) : 5개 처리구역, 6개 지구

- 하수관로 정비 522km, 배수설비 28,696개소

○ 2018년 사업(19.7%, 195,777백만원) : 중앙처리3,10분구 등 7개 처리구역

- 하수관로 정비 200km, 배수설비 10,713개소

(단위 : km, 백만원)

사 업 명		사업규모	총투자 규모	기투자액	2018년	2019년 이후	비 고 (추진실적/계획)
총 계		200.1	195,777	60,505	13,692	121,581
계속 사업 (’14~ ’21년)	중앙처리(3,10) (노송,금암,인후동)	55.3	39,742	35,763	1,099	2,880	・공사 중(‘15.12.~‘19.12월) ・공정 63%
	덕진, 중앙처리(1) (덕진,송천동)	19.5	14,890	13,879	1,011	-	・공사 중(‘17.6.~‘20.12월) ・공정 15%
	중앙처리(8,9,10) (한옥마을,공구거리)	7.1	6,823	6,210	613	-	・공사 중(‘17.6.~‘20.12월) ・공정 18%
	팔복처리(1,2) (금학천 일원)	26.4	23,742	1,460	5,569	16,713	・설계용역 중(‘18.9월 완료)
	중앙처리(9,10) (전동,노송동 일원)	33.6	39,380	1,693	2,400	35,288	・설계용역 중(‘18.11월 완료)
	중앙처리(8) (중앙,풍남동)	20.8	23,800	1,500	-	22,300	・설계용역 중(‘19.2월 완료)
신규 사업 (‘18년)	화산(1,2,6,7),아중(1) (완산,동서학, 삼천,평화,우아동)	37.4	47,400	-	3,000	44,400	・설계용역 중(‘19.12월 완료)

□ 금후계획

○ 잔여 사업(28.9%, 251,318백만원) 추진 : 2019. ∼ 2035년(17년간)

- 하수관로 293km, 배수설비 16,311개소

중앙8분구(역사도심) 하수관로 정비사업

역사도심지구 도시재생 활성화사업과 병행추진으로 사업의 효율성

제고 및 쾌적한 생태도시 구현과 새만금 상류 수질개선 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017. ∼ 2020년 (도시재생 활성화사업 기간)

○ 위    치 : 완산구 중앙동, 고사동, 전동, 풍남동 일원

○ 총사업비 : 23,800백만원(국비 50%. 도비 10％, 시비 35%, 기금 5％)

○ 사업규모 : 하수관로 정비 20.8㎞, 배수설비 684개소

□ 추진상황

○ 역사도심지구 구역 내 우․오수 분리사업 협의(생태도시계획과) : 2017. 2월

○ 2017년 추경예산 확보(시비 1,500백만원)                : 2017. 9월

□ 역사도심지구 도시재생 활성화 사업과 사업비 중복투자 예방 등 사업의 시급성, 효율성 등을 고려하여 국비 확보 전 실시설계 용역 추진(실시설계완료 지구 국비 우선 지원)

○ 행정절차 이행(일상감사, 원가심사, 계약심의)   : 2017. 10. ∼ 12월

○ 실시설계용역 착수(용역기간 12개월)                   : 2018. 2월

○ 2019년 국가예산 신규사업 신청(환경부)                : 2018. 3월

□ 금후계획

○ 실시설계용역 완료                            : 2019. 2월

○ 행정절차이행(재원협의, 하수도설치인가 등)  : 2019. 2. ∼ 4월

○ 공사추진                                      : 2019. 5. ∼ 2020. 12월

화산(1,2,6,7분구)·아중(1분구) 하수관로 정비사업

도시개발에 따른 하수처리 편입구역의 하수관로를 정비하여 쾌적한 생태도시 구현과 새만금 상류 수질개선에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2018. ∼ 2022년(5년간)

○ 위    치 ⌌ 완산구 완산동, 동서학동, 중화산동, 평화동, 삼천동, 효자동 일원

⌎ 덕진구 우아동, 인후3동, 진북동 일원

○ 총사업비 : 47,400백만원(국비 50%. 도비 10％, 시비 35%, 기금 5％)

○ 사업규모 : 하수관로 정비 37.4㎞, 배수설비 2,287개소

□ 추진상황

○ 2018년 예산확보(시비 3,000백만원)              : 2017. 12월

□ 사업의 시급성, 효율성 등을 고려하여 국비 확보 전 실시설계 용역 추진

(실시설계완료 지구 국비 우선 지원)

○ 2019년 국가예산 신규사업 신청(환경부)         : 2018. 3월

○ 행정절차 이행(일상감사, 원가심사, 계약심의 등)  : 2018. 3. ∼ 4월

○ 실시설계 용역 착수(용역기간 18개월)            : 2018. 6월

□ 금후계획

○ 실시설계용역 완료                      : 2019. 12월

○ 행정절차이행(재원협의, 하수도설치인가 등)  : 2019. 12. ∼ 2020. 2월

○ 공사추진                               : 2020. 3. ∼ 2022. 12월

전주 공공하수처리시설(4단계) 증설

에코시티, 효천지구 택지개발 등 도시개발에 따른 유입하수량 및

오염부하량 증가로 공공하수처리시설 증설 필요

* 국무총리 주재 제16차 새만금위원회에서 새만금 목표수질 달성을 위한 추가 보완대책 발표(2015. 12. 4.)

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017. ∼ 2021년(5년간)

○ 위    치 : 덕진구 고내천변로 하수처리장 부근

○ 총사업비 : 103,000백만원 (국비 50%, 도비 25%, 시비 20%, 기금 5%)

○ 사업규모 : 증설 49,000㎥/일 (현재 403,000㎥/일)

□ 추진상황

○ 전주시 하수도정비 기본계획 변경	: 2015. 2. ∼ 2017. 3월

○ 예비타당성조사 면제사업 요구(환경부)	: 2016. 12월

○ 예비타당성조사 면제사업 선정(기재부)	: 2017. 2월

- 한국개발연구원(KDI) 사업계획 적정성 검토 중

○ 다울마당 및 시의회(복지환경위) 간담회  : 2017. 2. ∼ 5월

□ 금후계획

○ 사업계획 적성성 검토 완료	: 2018. 7월

○ 사업추진방식 결정(민간투자방식 등)	: 2018. 8월

○ 시설사업 기본계획 수립 용역 및 사업추진 : 2018. ∼ 2021년

농촌마을 환경개선 마을하수도 정비사업

농촌마을에 오수관을 설치하여 생활오수를 깨끗이 처리함으로써 주민들의

삶의 질 향상 및 새만금 상류지역 수질개선 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2005. ∼ 2025년(20년간)

○ 총사업비 : 54,257백만원(국비 70%, 시비 25%, 기금 5%)

○ 사업규모 : 21개 지구(처리시설 700㎥/일, 관로 82.7km)

□ 추진상황

○ 2017년까지 완료(42%, 17,599백만원) 14개 지구

- 9개 지구(처리시설 540㎥/일 관로 34.7km), 5개 지구 연계처리

○ 2018년 사업 시행(58%, 36,658백만원) 7개 지구

- 처리시설 160㎥/일, 관로 48.0km

(단위 : km, 백만원)

사 업 명		사업규모	총투자 규모	기투자액	2018년	2019년 이후	비 고 (추진실적/계획)
총 계		48.0 Q=160㎥/일	36,658	15,021	3,785	18,138
계속 사업 (’14~’21년)	신중지구 (호성동)	13.2	7,546	7,366	466	0	・공사 중(‘16.3.~’19.5월) ・공정 90%
	수곡지구 (우아동)	8.2	4,915	2,133	778	2,004	・공사 중(‘17.3.~‘19.12월) ・공정 33%
	화신지구 (조촌동)	9.6 Q=95㎥/일	6,563	3,494	680	2,389	・공사 중(‘18.5.~‘21.5월) ・현장사무실 부지 선정
	원동지구 (조촌동)	2.8	2,244	1,600	100	544	・공사 중(‘18.5.~‘20.11월) ・현장사무실 부지 선정
	구원지구 (조촌동)	3.2	3,637	428	1,101	2,108	・공사 중(‘18.5.~‘20.11월) ・현장사무실 부지 선정
신규 사업 (’18년)	신기지구 (조촌동)	3.8 Q=65㎥/일	4,521	0	330	4,191	・실시설계용역 (‘18.4.~‘19.2월)
	전당, 아중.용계지구 (전미, 우아동)	7.2	7,232	0	330	6,902	・실시설계용역 (‘18.3.~‘19.1월)

□ 금후계획

○ 신기지구, 전당 아중·용계지구 실시설계용역 완료 : 2019. 1. ∼ 2월

○ 행정절차 이행(재원협의) 및 공사추진        : 2019. 2. ∼ 2023년

체계적인 지하수 관리로 하수도 자주재원 확충

지하수시설에 대한 체계적인 관리 강화로 적정한 지하수 개발․이용을

도모하고 수질오염 예방 및 물 부족 상황에 적극 대비

□ 사업개요

○ 기    간 : 2018. 1. ∼ 12월

○ 세원발굴 목표액 : 500백만원

- 2017년 부과액 11,712백만원 → 2018년 부과예상액 12,212백만원

※ 6월 현재 부과액 : 5,912백만원(부과예상액의 48%)

○ 지하수시설 등록현황 (2018. 6. 30일 기준)

(단위 : 개소)

총 계	생 활 용 수			농업용수	공업용수
	소 계	음용수	비음용수
6,282	3,577	298	3,279	2,638	67

○ 사업내용

- 하수도사용료 미부과 사유 및 계량기 설치․고장 여부 조사

- 미신고․허가 지하수시설 발굴 및 시설물 실태 파악

- 지하수시설 폐공, 미사용, 행불, 고장 여부 등 조사

- 「전주시 지하수 통합정보관리시스템」운영 활성화

□ 추진상황

○ 지하수 공인유량계 신설 및 교체(141개소)         : 2018. 1. ∼ 6월

○ 검침곤란 시설 옥외검침시스템 유지보수(674개소)  : 2018. 1. ∼ 6월

○ 지하수시설 이용실태 현장조사(농촌지역 등 304개소) : 2018. 3. ∼ 6월

○ 지하수 수인성 전염병 바이러스 표본검사(20개소)   : 2018. 5. ∼ 6월

○ 지하수 보조관측망 운영 : 자동관측시스템 4개소

□ 금후계획

○ 지하수 의심사용가·다량사용가에 대한 지속적 점검 관리

○ 공인유량계 신설·교체 및 옥외검침시스템 사후 유지관리

○ 지하수 수인성 전염병 바이러스 검사(10개소)     : 2018. 7. ∼ 8월

○ 지하수 보조관측망 추가 신설(4개소)             : 2018. 10. ∼ 12월

빗물이용시설 설치 지원 및 운영관리

빗물이용시설의 이용 활성화로 친환경 수자원 확보를 통한 물 순환

체계 회복 및 도심열섬․비점오염 저감 등 환경적 가치 실현

□ 시설현황

○ 빗물이용시설 구축 : 181개소(예산지원 138, 비지원 43)

- 공공기관 14, 교육기관 51, 공동주택 47, 일반주택 60, 기타 9

○ 설치비 지원(2010. ∼ 2018년) : 138개소 742백만원

□ 주요사업

구 분	도 비 지 원 사 업	국 비 지 원 사 업	비예산사업
사 업 명	빗물이용시설 설치	빗물이용 시범마을 조성	공동주택 등 대형 건축물 (홍보·안내)
사 업 량	2개소(민간 다중이용시설) 저장용량 2㎥ 규모	시범마을 1개소 (35∼40가구)
예 산	10백만원(도 4.5, 시 4.5, 자 1)	300백만원(국 150, 시 150)
사업기간	2018. 2. ∼ 5월	2018. 1. ∼ 8월

□ 추진상황

○ 탄소빗물여과장치 설치 지원(30개소 18백만원)     : 2018. 2. ∼ 4월

○ 시설 개보수 지원(15개소 5백만원)                : 2018. 3. ∼ 4월

○ 민간 다중이용시설 빗물이용시설 설치지원        : 2018. 3. ∼ 4월

- 지원대상 : 2개소(유치원 1, 어린이집 1)

○ 시설 운영실태 상반기 지도점검(176개소)          : 2018. 5. ∼ 6월

○ 빗물이용 시범마을 조성사업(서학동 예술마을)     : 2018. 1. ∼ 6월

- 사업대상지 선정, 주민설명회, 사업 참여 신청 접수 및 참여가구

확정, 주민협의체 구성, 마을공동체 협약체결, 설계용역 시행 중

□ 금후계획

○ 빗물이용 시범마을 조성사업 추진              : 2018. 7. ∼ 8월

○ 빗물이용시설 개보수 지원 및 운영실태 지도점검  : 2018. 9. ∼ 11월