제355회 전주시의회 제2차 정례회 2018년도 행정사무감사 도 시 건 설 위 원 회

2018년도

주요업무 추진상황 보고

시민안전담당관

보  고  순  서

□	일 반 현 황	-------	1
□	팀 별 주 요 기 능	-------	2
□	기 본 현 황	-------	3
□	주요업무 추진상황	-------	5

일  반  현  황

□ 기    구 : 4 팀

				시민안전담당관
안전총괄				안전관리				재난방재				민방위

□ 정․현원

구 분	총 계	일 반 직					비 고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	18	1	4	6	3	4
현 원	18	1	4	9	3	1

팀별 주요기능

팀별	분 장 사 무
안전총괄	○ 안전정책 총괄, 사회재난(생활안전 포함) 업무 총괄 ○ 국제 안전도시 공인사업 ○ 재난관리 자원 조사 ○ 재난대비 훈련(안전한국훈련 등) ○ 안전문화운동, 민간 예찰단 운영, 앱 신고, 재난안전교육 ○ 안전관리계획수립, 사망자수 감축 목표 관리제 ○ 재난시설물 안전점검, 어린이놀이시설 안전점검, 국가안전대진단 ○ 특별사법 경찰활동 총괄 ○ 안전관리자문단 운영 및 관리 ○ 수상레저업 등록 및 유·도선 업무
안전관리	○ CCTV 설치 및 운영관리 ○ CCTV 통합관제센터 운영 및 관리 ○ 승강기 유지관리 및 안전관리 업무 ○ 재난예·경보 시설 관리
재난방재	○ 자연재난 업무 총괄 ○ 재난안전대책본부, 재난상황실 운영, 재난관리시스템 운용 ○ 재난관리기금 관리 및 집행 ○ 재해위험지구 지정 및 관리, 사업추진 ○ 재난대비 자원조사 ○ 풍수해저감 종합계획 수립, 재해대책 평가, 재해복구계획수립 ○ 재해 예방사업 추진(공사, 보상 등) ○ 지역자율방재단 운영, 풍수해보험
민 방 위	○ 민방위교육, 인력동원, 민방위시설 및 장비 관리 ○ 을지연습, 충무계획 수립, 화랑훈련 등 ○ 통합방위협의회의 개최, 중점관리대상 자원 확인의 날 행사 ○ 사회복무요원 배치 및 지도 ○ 비상대비 계획수립 및 비상훈련, 예비군 육성자금 지원 등

기  본  현  황

□ 재해위험지구 지정현황

지구명	위 치	면적(㎡)	유형	위험등급	지정고시일 (해제고시일)	비고
어은	진북동 어은,도토리골 일원	416,900	침수위험	가	2010. 2. 26.	’18.10.17. 사업완료
진기들	전미동2가 1615-1번지 일원	3,633,400	침수위험	가	2010. 2. 26.	’16.1.19. 착공
야전	팔복동1가 일원	1,560,000	침수위험	가	2010. 4. 1.	’14.6.30. 착공
덕적 (해제)	평화동2가 714-9번지 일원	208,000	침수위험	가	2010.4.1. (2014.9.3.)	사업완료
색장 (해제)	색장동 은석교 앞 절개지(춘향로 ~ 국도17호선)	8,000	붕괴위험	가	2010.11.15. (2014.9.3.)	사업완료
원당	완산구 대성동 1030-79번지 일원	72,500	침수위험	나	2015. 9. 4.
중인	완산구 중인동 207-3번지 일원	304,000	침수위험	나	2015. 9. 4.	‘18.5.4. 실시설계 착수
금상	덕진구 금상동 1280-4번지 일원	412,000	침수위험	나	2015. 9. 4.	‘18.5.4. 실시설계 착수
송천1	덕진구 송천동2가 417번지 일원	213,200	침수위험	나	2015. 9. 4.	‘17.12.27. 착공
호성1	덕진구 호성동2가 78-4번지 일원	117,000	침수위험	나	2015. 9. 4.
월평	덕진구 전미동2가 1475번지 일원	305,476	침수위험	나	2017. 7. 28.

□ 어린이보호 및 방범용CCTV 설치 현황

총 계		방범용 CCTV		어린이보호구역 CCTV		어린이공원 CCTV		차량인식용 CCTV		비고
개소	대수	개소	대수	개소	대수	개소	대수	개소	대수
1,109	2,509	591	1,331	297	697	184	398	37	83

□ 예·경보시설 현황

(단위: 개소)

합계	재해문자 전광판	재난감시 CCTV	자동음성통보	우량관측시설	수위관측시설
36	2	15	7	7	5

□ 민방위 시설

(단위: 개소)

합계	민방공대피소	경보시설	비상급수시설	비 고
305	211	18	76

□ 어린이놀이시설

(단위: 개소)

합계	도시공원	어린이집	주택단지	식품업소	대형점포	기타
892	149	127	549	42	4	21

주요업무 추진상황

□	사회재난 없는 안전도시 조성	----	6p
□	시민과 함께하는 안전문화 확산	----	7p
□	국제안전도시 공인사업	----	8p
□	방범용CCTV 설치 및 운영	----	9p
□	자연재난 대비·대응력 제고	----	10p
□	어은 재해위험지구 정비사업	----	11p
□	야전 재해위험지구 정비사업	----	12p
□	진기들 재해위험지구 정비사업	----	13p
□	금상 재해위험지구 정비사업	----	14p
	중인 재해위험지구 정비사업	----	15p
	전주초지구 우수저류시설 설치사업	----	16p
	매화지구 우수저류시설 설치사업	----	17p
	송천1지구 우수저류시설 설치사업	----	18p
	민방위업무 추진	----	19p

사회재난 없는 안전도시 조성

○ 재난예방을 위한 체계적 대응능력을 강화하고 위험시설물 안전점검 및 보수보강 실시 등으로 시민의 생명과 재산을 보호하는 안전한 전주 조성

□ 사업개요

○ 재난상황실 운영 : 24시간 비상근무(유지) 및 비상단계별 근무체계 구축

○ 안전관리계획 수립 및 재난유형별 표준행동 매뉴얼 정비(22개)

○ 재난발생 위험 시설물 안전점검 강화

- 대상시설 : 지역축제 행사장, 민간다중이용시설 등

- 시설유형별 시기·사안별 안전점검 실시 및 보수·보강 등 안전조치

○ 어린이놀이시설 안전관리(안전관리시스템, 정기점검) : 892개소

□ 추진상황

○ 2018년도 전주시 안전관리 계획 수립(3개분야 28개유형)	’18. 3월

○ 재난발생위험시설물 안전점검 추진	연중

- 국가 안전대진단 추진(1,906개소 점검)               : ’18. 01. ~ 04.

- 지역축제장 안전관리계획 심의 및 민·관합동 안전점검(국제영화제 등)  :  10회

- 해빙기, 명절 등 취약시기별 재난위험시설물 안전점검        :  10회

- 스마트안전관리시스템에 의한 어린이놀이시설 안전점검(892개소) : 연중

□ 금후계획

○ 재난대응 행동 및 다중이용시설 위기상황 매뉴얼 정비	’18. 11.

○ 월동기 안전점검 및 국가안전대진단 운영	’18. 11. ~ ’19. 03.

○ 다중이용시설 등 수시 기동 안전점검 추진	연중

○ 어린이놀이시설 안전관리 지속점검 강화	연중

시민과 함께하는 안전문화 확산

○ 안전의식 제고를 위한 효과적인 안전교육·훈련 및 홍보 실시로 시민과

함께하는 생활 속 안전문화 여건 조성 및 확산

□ 사업개요

○ 재난·재해 대비 및 대응역량 강화 : 재난·안전교육 및 훈련 등

○ 시민의 자발적 참여를 통한 위험지역 예찰 활동 및 안전신고 활성화

○ 생활 속 안전문화 정착을 위한 대 시민 안전문화 홍보

□ 추진상황

○ 재난·재해대비 2018 안전한국훈련 실시 : ’18. 05. 8 ~ 18

- 유관기관 참여 대규모 현장훈련(화재 및 유해화학물질 누출)

- 지진 및 청사화재발생 대피 훈련 및 응급조치 교육 : 2회

○ 재난대비 맞춤형 생활안전교육 실시 : 4회 200여명(완산구 2, 덕진구 2)

- 전북119안전체험관 재난체험 활동 등(자생단체 및 취약계층 등)

○ 시민안전 및 불편해소를 위한 안전점검 및 예찰 활동

- 대시민 안전문화 확산을 위한「안전점검의 날」운영 : 10회 700명

○ 생활 속 위해요소 제거를 위한 안전신문고 운영 : 4,080건(1~10월)

○ 고질적 안전무시 관행 근절을 위한 안전보안관 구성 및 운영(65명) : ’18. 07.~

□ 금후계획

○ 민간단체 참여 생활속 안전점검 예찰활동 지속 추진	연중

○ 안전신문고 앱 활성화로 생활 속 안전위해요소 사전 처리	연중

○ 대시민 안전문화 확산을 위한「안전점검의 날」운영 : 월 1회(매월4일)

○ 재난대비 맞춤형 생활안전교육 운영(60여명)	’18. 11.

○ 안전무시 관행근절을 위한 시민홍보 및 예찰활동 등 강화 : 연중

- 민간단체 주도 안전점검 및 캠페인 활동 전개

국제안전도시 공인사업

○ 국제기준에 맞는 안전증진사업 지속 추진으로 안전 환경을 제공하여      시민이 안전하고 행복한 전주 구현

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015. 4. ∼ 계속

○ 사 업 비 : 113백만원(2018년)

○ 사업내용 : 국제안전도시 공인(협약, 공인조건 추진, 공인신청)

- 안전도시 만들기 기본조사 연구용역

- 상호 협력기반 마련(조례 제정, 위원회 구성)

- 공인조건 프로그램 운영, 수행과정 및 효과 평가 등

□ 추진상황

○ 국제안전도시 만들기 기본조사 연구용역 추진	’15. 04. ~ ’16. 02.

○ 국제안전도시 공인사업 기본계획 수립	’16. 03. 31.

○ 국제안전도시 7가지 공인기준별 추진계획 수립	’17. 03. 20.

○ 한국 네트워크 활동 및 공인 평가를 위한 자문(13회)	’17. 01. ~ 18. 6.

○ 국제안전도시 공인신청	’17. 09.22.

○ 국제안전도시 공인 사전 현지실사	’17.10.25. ~ 10.26.

○ 국제안전도시 공인 본실사(국·내외실사단)	’18.05.02. ~ 05.03.

○ 국제안전도시 공인 확정	’18.05.08.

○ 국제안전도시 공인 선포식	’18.08.27.

□ 금후계획

○ 재공인(2023년) 기준에 의한 프로그램 개발 및 사업 지속 추진	연   중

○ 안전도시 협의회 및 실무(분과)위원회 회의	분기별

○ 국제안전도시 한국네트워크 참여(국내외)	연  중

방범용 CCTV 설치 및 운영

○ 취약지역 방범용 CCTV 설치로 365일 안전한 도시 구현

○ 24시간 CCTV 관제업무 수행으로 범죄 예방 및 사고 시 즉각 대응

□ 사업개요

○ CCTV 통합관제센터 운영

- 위    치 : 시청 8층, 면적 280㎡

- 사 업 비 : 1,920백만원(운영비 494, 민간이전 686, 자산취득비 740)

- 근무인원 : 21명(경찰 3, 관제요원 18) / 3조 2교대

- 관제대수 : 2,509대(방범용 1,331, 어린이보호 697, 어린이공원 398, 차량인식 83)

○ 방범용 CCTV 설치

- 사 업 비 : 784백만원(시비 691, 도비 93)

- 사업규모 : 방범 CCTV 74개소 201대 / 차량인식 2개소 5대 설치

- 사업대상 : 관내 방범 취약지역 및 주요 통행도로

○ 어린이보호용 CCTV 설치

- 사 업 비 : 840백만원(시비 180, 도비 660)

- 사업규모 : 어린이보호용 CCTV 36개소 89대 설치

- 사업대상 : 초등학교, 어린이집 주변 등 어린이보호구역

□ 추진상황

○ 방범 및 어린이보호 CCTV 설치(80개소 205대)	’18. 04. ~ 10.

○ 영상 저장용 스토리지 구입 및 노후 교체	’18. 05. ~ 10.

○ 차량인식용 CCTV 설치 (2개소 5대)	’18. 11.

○ 저화질 CCTV 카메라 교체	’18. 11.

□ 금후계획

○ 방범 및 어린이보호 CCTV 설치(30개소 85대)	’18. 12.

○ CCTV 통합관제센터 내실 운영(관제, 경고방송 실시 등)	연중

자연재난 대비·대응력 제고

○ 사전예측을 통한 선제적 상황관리체계 운영 및 인명피해 우려지역 등 지속적 점검 및 예찰로 인명피해 최소화

□ 사업개요

○ 한 단계 빠른 상황판단 회의 운영 및 비상근무 실시

- 기상 상황에 따라 5단계(평상시, 보강단계, 비상 3단계) 상황유지

○ 재난관리기금 운용 및 재해예방사업 추진

○ 자연재난 대비 매뉴얼 수립 및 상황전파·초동대처 훈련 실시

○ 재해 취약시설 점검·정비 및 신속한 복구 지원

□ 추진상황

○ 24시간 상시 비상근무체계 구축 및 재난상황근무 강화	연중

○ 재난 예·경보시설 통합관리시스템 구축	’17. 03.~ 18. 10.

- 예·경보시설 개선 및 교체, 영상관제시스템 개선 등[협약체결 : 전주시↔K-Water]

- 재난 예·경보시설 추가 및 개선, 서버 이중화 사업 등

○ 여름철 자연재난 대비 재난안전대책본부 운영	’18. 05. ~ 10.

○ 재해 취약시설 점검·정비 실시 : 12회

- 정기점검 : 2회(3월, 6월) / 수시점검 : 10회(호우 7회, 태풍 3회)

□ 금후계획

○ 겨울철 자연재난 대비 재난안전대책본부 운영	’18. 11. ~ ‘19. 03.

○ 재해 취약시설 점검·정비 및 신속한 복구지원	연중

○ 풍수해 보험 홍보 및 보험가입 추진	연중

○ 자연재난 대응 매뉴얼 정비(풍수해, 지진, 대형화산폭발)	’18. 12.

어은 재해위험지구 정비사업

○ 집중호우 시 전주천 수위상승으로 홍수위보다 낮은 어은지구의

침수피해를 예방하여 시민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 진북동 어은․도토리골 일원

○ 사업규모 : 펌프장 5개소, 관로 정비 1.1㎞

○ 총사업비 : 15,300백만원(국 7,650, 도 3,060, 시 4,590)

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2018년 (5개년)

□ 추진상황

○ 자연재해위험지구 지정	’10. 02.

- 유형 : 침수위험지구(가등급), 지정면적 : 416,900m²

○ 기본 및 실시설계용역 추진	’14. 06. ~ ’15. 09.

○ 행정절차이행(사전설계검토, 계약심의 등)	’15. 02. ~ 09.

○ 공사 착공	’15. 09.

○ 공사 준공(공정 100%)	’18. 10.

- 펌프장 5개소, 관로 정비 1.1㎞

□ 금후계획

○ 시설물 인수․인계	’18. 11.

○ 자연재해위험지구 해제	’18. 12.

야전 재해위험지구 정비사업

○ 집중호우 시 전주 천 수위상승으로 홍수위보다 낮은 야전지구의

침수피해를 예방하여 시민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 팔복동 야전마을 일원

○ 사업규모 : 유수지 1개소, 펌프장 5개소, 관로 정비 2.9km

○ 총사업비 : 29,400백만원(국 14,229, 도 5,618.4, 시 7,749.6, 특교 1,803)

- 기투자 : 22,231백만원(국 12,805, 도 3,609.4, 시 4,013.6, 특교 1,803)

- ’18년도 :  7,169백만원(국  1,424, 도 2,009   시 3,736) - 계속비

○ 사업기간 : 2013년 ∼ 2019년 (7개년)

□ 추진상황

○ 자연재해위험지구 지정	’10. 02.

- 유형 : 침수 위험지구(가등급), 지정면적 : 1,560,000m²

○ 기본 및 실시설계용역 추진	’13. 05. ~ ’14. 10.

○ 행정절차이행(사전설계검토, 계약심의 등)	’14. 01. ~ 04.

○ 공사 추진(공정 90%)	’14. 06. ~

- 1~3차분(’14~’17년) 준공 : 관로 정비 L=2.5km, 펌프장 2개소

- 4차분(’17~’18년) 추진 : 관로 정비 L=0.4km, 펌프장 1개소, 유수지 1개소

□ 금후계획

○ 공사 추진	’18. 11. ~ ’19. 03.

- 펌프장 2개소, 유수지 1개소(잔여공정)

진기들 재해위험지구 정비사업

○  집중호우 시 전주천 ․ 만경강의 수위상승으로 홍수위보다 낮은

진기들 지구의 침수피해를 예방하여 시민의 생명과 재산보호

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 전미동2가 1615-1번지 일원

○ 사업규모 : 유수지 1개소, 펌프장 1개소, 배수로 정비 2.1km, 교량 10개소 등

○ 총사업비 : 26,305백만원(국 13,152, 도 5,261, 시 7,892)

- 기투자 : 16,621백만원(국  8,887, 도 3,851, 시 3,883)

- ’18년도 :  9,684백만원(국  4,265, 도 1,410, 시 4,009)

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2019년 (6개년)

□ 추진상황

○ 자연재해위험지구 지정 및 관리	’10. 02.

- 유형 : 침수위험지구(가등급), 지정면적 : 3,633,400㎡

○ 기본 및 실시설계용역 추진	’14. 06. ~ ’15. 06.

○ 행정절차이행(사전설계검토, 계약심의 등)	’15. 07. ~ 11.

○ 공사 추진(공정율 40%)	’16. 01. ~

- 유수지 1개소, 교량 3개소 완료

○ 계약 해지 및 타절 준공	’18. 04. ~ 05.

○ 잔여사업 발주에 따른 행정절차 이행	’18. 06. ~ 09.

- 도 컨설팅 감사, 실시설계(보완)용역, 원가심사, 계약심의 등

○ 공사 착공	’18. 10.

□ 금후계획

○ 공사 추진	’18. 11. ~ ’19. 12.

- 잔여사업 물량(교량 7개소, 배수로 정비 2.1km 등)

금상 재해위험지구 정비사업

○ 집중호우 시 만경강 수위상승으로 홍수위보다 낮은 금상지구의

침수피해를 예방하여 시민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 완산구 금상동 1280-4번지 일원

○ 사업규모  : 제방정비 2.2km, 교량 5개소 등

○ 총사업비 : 7,500백만원(국 3,750, 도 1,500, 시 2,250)

- ’18년도 : 1,000백만원(국   500, 도   200, 시  300)

- 이후예산 : 6,500백만원(국 3,250, 도 1,300, 시 1,950)

○ 사업기간 : 2018년 ∼ 2021년 (4개년)

□ 추진상황

○ 자연재해위험지구 지정 및 관리	’15. 09.

- 유형 : 침수위험지구(나등급), 지정면적 : 412,000㎡

○ 재해위험지구 신규 사업대상지 신청	’17. 04.

○ 재해위험지구 신규 사업대상지 선정 통보(행정안전부)	’17. 10.

○ 실시설계 용역 추진	’18. 05.~ ’19. 03.

□ 금후계획

○ 사전설계 검토(전라북도)	’18. 12.

○ 행정절차이행(설계자문심의, 계약심의 등)	’19. 01.

○ 공사 추진	’19. 02. ~ ’21. 12.

- 제방정비 2.2km, 교량 5개소 등

중인 재해위험지구 정비사업

○ 집중호우 시 독배천 외수위 영향으로 홍수위보다 낮은 중인지구의

침수피해를 예방하여 시민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 완산구 중인동 207-3번지 일원

○ 사업규모  : 제방정비 1.8km, 교량 5개소 등

○ 총사업비 : 12,000백만원(국 6,000, 도 2,400, 시 3,600)

- ’18년도 :  1,000백만원(국 500, 도   200, 시  300)

- 이후예산 : 1,100백만원(국 5,500, 도 2,200, 시 3,300)

○ 사업기간 : 2018. 01. ∼ 2021. 12.(4개년)

□ 추진상황

○ 자연재해위험지구 지정 및 관리	’15. 09.

- 유형 : 침수위험지구(나등급), 지정면적 : 304,000㎡

○ 재해위험지구 신규 사업대상지 신청	’17. 04.

○ 재해위험지구 신규 사업대상지 선정 통보(행정안전부)	’17. 10.

○ 실시설계 용역 추진	’18. 05.~ ’19. 08.

□ 금후계획

○ 사전설계 검토(행정안전부)	’19. 01.

○ 행정절차이행(설계자문심의, 계약심의 등)	’19. 02.

○ 공사 추진	’19. 03. ~ ’21. 12.

- 제방정비 1.8km, 교량 5개소 등

전주초지구 우수저류시설 설치사업

○ 저지대 상습 침수지역을 홍수 피해로부터 예방하고, 저류된 빗물을

대체 수자원으로 활용하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 :  완산구 태평동 210-2번지 일원

○ 사업규모 : 저류시설 6,800㎥(A=1,030, H=7.0),  펌프장 1개소, 관로 정비 0.5km

○ 총사업비 : 12,450백만원(국  6,225, 도  1,867, 시  4,358)

- 기투자 :  4,165백만원(국  3,862, 도    149, 시    154)

- ’18년도 :  8,285백만원(국  2,363, 도  1,718, 시  4,204)

○ 사업기간  : 2015년 ∼ 2019년 (5개년)

□ 추진상황

○ 우수저류시설 사업대상지 선정	’14. 10.

○ 기본 및 실시설계용역 추진	’15. 06. ~ ’17. 06.

○ 행정절차이행(사전설계검토, 계약심의 등)	’17. 01. ~ ’17. 09.

○ 공사 추진(공정율 15%)	’17. 11.

○ 주민설명회(2회)	’17. 12. / ’18. 04.

- 주민의견 수렴 및 현장 설명 등

□ 금후계획

○ 공사 추진	’18. 11. ~ ’19. 12.

- 저류시설 1개소, 펌프장 1개소, 관로 정비 L=0.5km

매화지구 우수저류시설 설치사업

○ 저지대 상습 침수지역을 홍수 피해로부터 예방하고, 저류된 빗물을

대체 수자원으로 활용하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 팔복동2가 94-2번지 일원

○  사업규모  : 저류시설 13,200㎥(A=6,370, H=2.9),  펌프장 1개소, 관로정비 1.1km 등

○ 총사업비 : 15,600백만원(국 7,800, 도 2,340, 시 5,460)

- 기투자 :  3,702백만원(국 3,656, 도    41, 시    5)

- ’18년도 : 11,898백만원(국 4,144, 도 2,299, 시 5,455)

○ 사업기간  : 2015년 ∼ 2019년(5개년)

□ 추진상황

○ 우수저류시설 사업대상지 선정	’14. 10.

○ 기본 및 실시설계용역 추진	’15. 06. ~ ’17. 06.

○ 행정절차이행(사전설계검토, 계약심의 등)	’17. 01. ~ ’17. 05.

○ 편입토지 감정평가 및 보상협의	’17. 05. ~ ’18. 03.

- 보상대상 22필지(4,216㎡)중 20필지(2,725㎡) 보상 완료

○ 공사 추진(공정율 20%)	’17. 07.

- 관로 정비 L=0.5km

○ 토지수용 및 보상금 공탁(2필지)	’18. 03.

□ 금후계획

○ 공사 추진	’18. 11. ~ ’19. 12.

- 저류시설 1개소, 펌프장 1개소, 관로 정비 L=0.6km

송천1지구 우수저류시설 설치사업

○ 저지대 상습 침수지역을 홍수 피해로부터 예방하고, 저류된 빗물을

대체 수자원으로 활용하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동2가 597-4번지 일원

○ 사업규모  : 저류시설 18,500㎥(A=2,700, H=7.6), 펌프장 1개소, 관로 정비 0.7km

○ 총사업비 : 25,388백만원(국 12,694, 도 3,808, 시 8,886)

- 기투자 :  1,143백만원(국  1,093, 도    23, 시   27)

- ’18년도 : 14,033백만원(국  7,407, 도 2,527, 시 4,099)

- 이후예산 : 10,212백만원(국 4,194, 도 1,258, 시 4,760)

○ 사업기간 : 2016년 ∼ 2019년 (4개년)

□ 추진상황

○ 우수저류시설 사업대상지 선정	’15. 10.

○ 기본 및 실시설계 용역 추진	’16. 04. ~ ’17. 12.

○ 행정절차이행(사전설계검토, 계약심의 등)	’17. 11. ~ 12.

○ 공사 추진(공정율 15%)	’17. 12.

○ 편입토지 감정평가 및 보상협의	’18. 08. ~

- 보상대상 19필지(3,633㎡)중 2필지(63㎡) 보상 완료

○ 주민설명회(3회)	’18. 07. ~ 10.

- 주민의견 수렴 및 현장 설명 등

○ 토지수용 재결 신청(17필지)	’18. 10.

□ 금후계획

○ 공사 추진	’18. 11. ~ ’19. 12.

- 저류시설 1개소, 펌프장 1개소, 관로 정비 L=0.7km

민방위업무 추진

○ 전시 또는 이에 준하는 비상사태 발생 등 언제 일어날지 모르는

위협으로부터 국민의 생명과 재산을 보호하고자 함

□ 사업개요

○ 전시 대비 충무계획 수립 : 총괄 및 인력동원 실시계획

○ 민방위 편성(20~40세 남자) : 36,728명

- 1~4년차 15,014명, 5년차 이상 21,714명   *’18. 10월 기준

○ 국가비상태세 확립을 위한 을지연습 추진

○ 통합방위태세 확립을 위한 통합방위협의회의 개최

○ 민방위 시설․장비 점검 및 정비

- 대피시설 211개소, 경보시설 18개소, 공공용급수시설 10개소

○ 경보방송시설 노후 위성수신기 교체(8백만원)

- 장  소 : 호성동주민센터, 효자5동주민센터

□ 추진실적

○ 충무계획 수립	’18. 02.

○ 통합방위협의 회의 개최(3회)	’18. 03/ 06 /09.

○ 중점관리자원 확인의 날 개최(3회)	’18. 03./ 05./ 10.

○ 민방위 교육 실시(52회)	’18. 03 ~ 11.

○ 경보시설 노후 위성수신기 교체	’18. 06.

○ 민방위시설장비 점검(5회)	’18. 03 ~ 10.

○ 민방위 화생방 방독면 구입 및 보급	’18. 10.

○ 충무·화랑훈련 실시	’18.10.29∼11.2.

□ 금후계획

○ 민방위시설장비 점검(2회)	’18. 11 ~ 12.

○ 통합방위협의 회의 개최(1회)	’18. 12.