제367회 전주시의회 임시회 도 시 건 설 위 원 회

2020년도

주요업무계획

생 태 도 시 국

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진계획
	○	생태도시계획과	-------	8
	○	천만그루정원도시과	-------	16
	○	건축과	-------	26
	○	주거복지과	-------	37
	○	신도시사업과	-------	50
	○	걷고싶은도시과	-------	58
	○	시민의숲 1963추진단	-------	71

일  반  현  황

□ 기  구 : 7과 32팀

													생태도시국
생태도시 계 획 과 (6팀)					천만그루 정원도시과 (6팀)					건축과 (6팀)					주 거 복지과 (4팀)					신도시 사업과 (3팀)					걷고싶은 도 시 과 (4팀)					시민의숲 1963추진단 (3팀)
생태도시 행 정					천만그루기 획					광고물행정					주거복지 정 책					택지개발					도로시설					1963기획
생태도시 계 획					천만그루 조 성					공동주택					사회주택					에코시티					도로정비					경기장이전
생태도시 조 성					정원문화 산 업					건축정책					주거재생					부대이전					생태하천					컨벤션시설
토지관리					꽃 도 시 조 성					주택재개발					해피하우스										걷고싶은길 조 성
공간정보					공원조성					하도급관리
주소정보					산림관리					건축안전

□ 정‧현원

과 별		총계	일 반 직						임기
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정원	127	1	7	32	40	34	13
	현원	138	1	8	37	47	25	15	5
생태도시계획과	정원	24	1	1	6	8	5	3
	현원	25	1	2(파견1)	6	10(휴직1)	6
천만그루 정원도시과	정원	23		1	6	9	6	1
	현원	24		1	6	6	6	4	1
건 축 과	정원	23		1	6	5	9	2
	현원	23		1	9	6	4	2	1
주거복지과	정원	15		1	4	5	1	4
	현원	19		1	5	6		4	3
신도시사업과	정원	14		1	3	2	5	3
	현원	15		1	3	5	4	2
걷고싶은도시과	정원	18		1	4	7	6
	현원	19		1	4	8(휴직1)	4	2
시민의숲 1963추진단	정원	10		1	3	4	2
	현원	13		1	4	6	1	1

부서별주요기능

과 별	분 장 사 무
생태도시 계 획 과	○ 전문건설업 등록 관리 ○ 지속가능한 생태도시 종합계획 ○ 도시기본계획수립 및 관리계획결정, 도시계획사업 시행인가 ○ 지적업무 총괄, 공시지가, 부동산중개업 지도‧감독 ○ 공간정보시스템 운영 및 연계사업 관리, DB관리 ○ 도로명주소 홍보 및 부여사업, 시설물 관리
천만그루 정원도시과	○ 천만그루정원도시 종합계획 수립 및 추진기반 조성 ○ 도시녹화사업 종합계획 수립, 도시녹화사업 추진, 녹지시설물 관리 ○ 정원문화 확산 및 시민참여 활성화 ○ 지방정원 및 꽃도시 조성, 양묘장 관리 ○ 공원조성계획 수립, 국토공원화 사업, 공원시설물 관리 ○ 재해로부터 안전한 산림관리 추진, 산림속 휴양공간 조성
건 축 과	○ 옥외광고물 관리 및 정비, 간판개선사업 ○ 주택건설사업계획승인, 사용검사, 입주자 모집 승인 ○ 건축인·허가, 건축심의, 건축 안전관리 추진 ○ 공공건축 설계공모 운영, 도시주거환경개선 ○ 주택재개발ㆍ재건축 ○ 지역건설업체 활성화
주거복지과	○ 주거복지 기본계획 수립, 저소득층 주거급여 지원 ○ 전주형 사회주택 및 청년매입임대주택 공급 ○ 저소득층 노후주택 개보수 사업 ○ 빈집 정비사업 및 빈집 플랫폼 운영 ○ 주거지재생, 골목길 정비사업 추진 ○ 해피하우스 센터운영 및 사업 추진
신 도 시 사 업 과	○ 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 ○ 택지개발사업 계획 및 공사 ○ 도시개발사업완료지구 유지관리 ○ 혁신도시 유지관리 및 정주여건 개선 ○ 부대이전 및 부지개발 ○ 교도소 이전사업 등
걷고싶은 도 시 과	○ 국‧공유재산(도로)관리 및 용도폐지 ○ 신규 도로개설 및 용지보상, 도시가로망 확충 ○ 국도 및 고속도로 지원 ○ 도로유지관리, 도로안내표지판 및 가로등 관리 ○ 생태하천 복원사업 및 하천공사 ○ 전주시 걷고싶은길 통합 관리
시민의숲 1963추진단	○ 전주 종합경기장 부지재생 ○ 대한방직 부지 관련 공론화위원회 추진 ○ 전주 육상경기장 증축 및 야구장 건립 ○ 전시컨벤션·호텔 건립

기  본  현  황

□ 도시계획 연혁

년 월 일	고 시 청	번 호	계획면적 (㎢)	목표 년도	계획인구	주 요 내 용
1938. 5. 9	조선총독부	403	19.76	1948	100,000	도시계획구역 결정(1차)
1966. 2.10	국토해양부	2,188	108.71	1983	550,000	도시계획 재정비(2차)
1970. 4.14	〃	178	157.22	1986	500,000	도시계획 재정비(3차)
1973. 6.27	〃	258	313.20			개발제한구역 216.4㎢ 지정
1974. 8.14	〃	272	313.20			도시계획 재정비(4차)
1976. 3.27	〃	37	313.20			도시계획 재정비(5차)
1986. 5. 8	〃	206	313.20	1991	610,000	도시계획 재정비(6차)
1995. 6.29	전라북도	112	313.20	2001	860,000	도시계획 재정비(7차)
2003. 6.26	국토해양부	161	302.67			개발제한구역 225.4㎢해제
2005. 7.29	전라북도	186	313.18	2010	748,000	도시계획 재정비(8차)
2015. 8.28	전주시	112	206.28	2020	769,000	도시계획 재정비(9차)

□ 도시지역(4개 용도지역) 197.63㎢  (전주시면적 : 206.28㎢)

구분	주 거 지 역				상업 지역	공 업 지 역				녹 지 지 역
	계	전용주거	일 반 주 거	준 주거		계	전용공업	일반 공업	준 공업	계	생산 녹지	자연 녹지	보전 녹지
면적	35.23	0.30	33.96	0.97	4.50	6.57	1.44	4.28	0.85	151.33	24.78	75.56	50.99
비율 (%)	17.8	0.1	17.2	0.5	2.3	3.3	0.7	2.2	0.4	76.6	12.6	38.2	25.8

※ 비도시지역 8.65㎢(관리지역 2.76㎢, 농림지역 5.62㎢, 자연환경보전 0.27㎢)

□ 용도지구 ------------------------------- 7개지구 19.5㎢

지 구 명	개 소 수	면 적(㎡)	비 고
고 도	24	8,003,575	역사도심 4개소 반영 (35,217) 최저고도 3개소 삭제
방 화	21	4,075,560
시가지경관	84	3,317,029	재정비조서와 일치 명칭변경(미관→시가지경관)
자연취락	157	3,332,476	여실지구 반영(26,688) (월드컵경기장 해제지역)
자연경관	8	512,447	명칭변경(경관→자연경관 )
특정용도제한지구	1	249,000	명칭변경(시설보호→특정용도제한지구)
보 호	2	6,179	명칭변경(보존→보호)

□ 토    지                                     (단위 : ㎢)

구분	합 계		대 지			임 야			기 타
	필지수	면적	필지수	면적	비율	필지수	면적	비율	필지수	면적	비율
계	193,050	206	77,383	32.8	15.9	10,558	66.2	32.1	105,109	107	52

□ 공원 분포현황

구분	전주시 전체		공 원 면 적			공 원 결정율 (C/A)	1인당 공원면적
	면적(A)	인구(B)	결정(C)	조성(D)	조성율 (D/C)		결 정 (C/B)	조 성 (D/B)
계	206.3㎢	654천명	22.19㎢	5.67㎢	25.54%	10.76%	33.93㎡	8.66㎡

□ 공원현황                              (단위 : 개소, ㎡)

공원의 종 류		공 원 수			공 원 면 적			비고
		계	완산	덕진	계	조 성	미 조성
계		250	141	109	22,189,498.4	5,666,407.9	16,523,090.5
도립공원		1	1		5,608,490	939,069	4,669,421	모악산
도시공원 총계		249	140	109	16,581,008.4	4,727,338.9	11,853,669.5
생활권공원	소 계	240	135	105	14,192,539.2	4,133,028.9	10,059,510.3
	근 린 공 원	61	34	27	13,849,049.8	3,805,862.5	10,043,187.3
	어린이공원	135	80	55	298,720.9	286,753.9	11,967
	소 공 원	44	21	23	44,768.5	40,412.5	4,356
주제공원	소 계	9	5	4	2,388,469.2	594,310.0	1,794,159.2
	역사공원	2	2		1,680,110	80,740.8	1,599,369.2	산성, 중앙
	문화공원	4	2	2	40,230.9	40,230.9		태평,곰솔나무,팔복,만성문화
	수변공원	2		2	246,808.3	246,808.3		기지제, 만성수변
	묘지공원	1	1		421,320	226,530	194,790
	체육공원	-	-		-	-	-

□ 공원시설물 현황                                (단위 : 개)

합 계	편의시설	운동시설	화장실	어린이 놀이시설	공원등	보안시설 (CCTV)	비 고
15,838	6,768	2,513	82	660	5,393	422

□ 가로수 식재현황                           (단위:그루)

구분 노선수	합계	느티 나무	은행 나무	벚나무	이팝 나무	단풍 나무	회화 나무	낙우송	기타
288	64,030	16,856	12,063	6,782	8,478	5,796	1,745	1,306	11,004

□ 보호수 및 노거수 현황                        (단위:그루)

구 분	계	느티나무	왕버들	은행나무	팽나무	회화나무	참죽나무	주엽나무
보호수	26	9	7	7	1	1	1
노거수	74	26	27	2	16	2		1

□ 소유별 임야면적                                 (단위:㏊)

총 계	사유림	국유림	공유림	비 고
6,249	5,415	677	157

□ 보전산지 현황                                   (단위:㏊)

계	보전녹지	자연공원	문 화 재 보호구역	조 수 보호구역	사찰림	사방지	비고
4,460	3,760	623	25	23	28	1

□ 주    택                                        (단위:세대)

구 분	계	단독주택	다세대주택 동당660㎡미만	연립주택 (4층이하)	아파트 (5층이상)	일 반 가구수	주 택 보급율
주택수	305,247	122,022	3,141	4,754	175,330	273,613	111.56%
비율(%)	100	40.0	1.0	1.6	57.4

□ 도시․주거환경정비 예정지구 현황

방 식	개소수	면 적 (㎢)	세 대 수
			계	현 재	증 가
계	43	2.79	32,901	16,950	15,951
주택재개발	14	1.44	15,618	5,953	9,665
주택재건축	15	0.48	9,804	6,762	3,042
주거환경개선	14	0.87	7,479	4,235	3,244

□ 광고업 등록 및 옥외광고물 현황

(’19년 12월말 기준)

광고업자 등록현황 (명)	옥외광고물 (개)	시 지정 광고시설(개소)
		계	게시대	벽보판	육교 현수막	비 고
370	36,848	250	162	85	3	전주시 시설관리공단 운영

□ 도    로                                        (단위:개소, ㎞)

구 분	계		고속국도		일반국도		지 방 도		시 도
	노선	연장	노선	연장	노선	연장	노선	연장	노선	연장
총연장	2,745	837	2	13	5	35	2	15	2,736	774
포장도	2,745	837	2	13	5	35	2	15	2,736	774
포장율 (%)		100		100		100		100		100

※ 도로율 : 8.17%(도로면적/시가지면적)

□ 교량 및 기타시설물                                 (단위 : 개)

구분 계	교 량					육교	지하 보도	지하차도	터널	언더 패스	비고
	소계	고속 국도	일반 국도	지방도	시도
178	141		23	4	114	9	6	5	2	15

※ 장대교량 (삼례교 : 570m, 회포대교 : 707m)

□ 하천현황                                          (단위 : ㎞)

구 분		개소	하천연장	제 방 연 장			개수율 (%)	비고
				계	기개수	미개수
계		32	116.3	201.7	140.9	60.8	69.9
법정하천	소 계	20	99.6	168.3	138.3	30.0	82.2
	국가하천	3	18.2	32.2	32.2	-	100.0
	지방하천	17	81.4	136.1	106.1	30.0	78.0
소 하 천		12	16.7	33.4	2.6	30.8	7.8

□ 택지개발 현황

구 분	계		완 료		추 진 중
	개소수	면 적(㎡)	개소수	면 적(㎡)	개소수	면 적(㎡)
합 계	30	23,567,490	29	21,569,780	1	1,997,710
구획정리	12	6,819,077	12	6,819,077	-	-
택지개발	13	6,342,924	13	6,342,924	-	-
도시개발	5	10,405,489	4	8,407,779	1	1,997,710

□ 도로명 현황                                        (단위 : 개)

구 분	계	대로	로	길	비고
도로명수	1,209	3	205	1,001

□ 도로명주소 안내시설                                (단위 : 개)

구 분	합계	도로명판	기초번호판	국가지점 번호판	지역안내판	건물번호판
시 설 물	76,327	10,830	2,069	219	64	63,145

생태도시계획과 소관

□	전주 도시관리계획 재정비	----	9
□	서학동 예술마을 지구단위계획 수립	----	10
□	지속가능한 생태도시 종합계획 세부실천계획	----	11
□	2020년도 개별공시지가 조사	----	12
□	지적재조사 사업 추진	----	13
□	건설사업지 드론촬영과 영상제작 추진	----	14
□	찾기 쉬운 도로명주소 생활화 추진	----	15

생태도시계획팀

전주 도시관리계획 재정비

○ 국토계획법에 따라 도시 여건 변화를 반영하고, 도시기본계획 등
상위계획과의 정합성 확보를 위하여 5년마다 정비하는 법정계획임

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2018. 4.∼2020. 10.

○ 공간범위 : 전주시 행정구역(205.49㎢)

○ 사 업 비 : 2,512백만원(재정비 2,113, 교통영향평가 183, 전략환경영향평가 216)

○ 주요내용

- 용도지역·지구·구역의 재정비    - 지구단위계획 재정비

- 기반시설의 타당성, 관리방안 및 집행계획 재검토

- 장기미집행 도시계획시설 일몰제 대비 도시관리계획 수립 등

□ 추진상황

○ 용역착수 및 기초조사 실시	: ’18. 4.∼ 8.

○ 장기미집행 도시계획시설 단계별 집행계획 공고	: ’18. 11.∼12.

○ 용도지역‧지구, 도시계획시설, 지구단위계획 검토	: ’18. 8.∼’19. 8.

- 용도지역‧지구‧구역, 도시계획시설, 지구단위계획 정비기준(안) 마련

- 전주 수목원 진입도로(소로1-552호선) 결정 고시( ’19.1.31.)

- (시가지, 역사문화) 경관지구 지정에 따른 도시계획조례 개정(’19.4.19.)

- 장기미집행시설(공원, 도로, 녹지) 일몰제 대비 방안 수립 (’19. 5.∼10.)

○ 팔복동 공업지역 지구단위계획 수립 고시	: ’19. 9. 11.

○ 역사도심 지구단위계획 변경 수립 고시	: ’19. 11. 8.

○ 도시관리계획 재정비 대상 수요 추가조사	: ’20. 1.

○ 도시관리계획 재정비 도서 작성	: ’19. 9.∼’20. 3.

- 용도지역‧지구‧구역, 도시계획시설, 지구단위계획 정비(안) 작성

□ 추진계획

○ 주민공람, 관계기관(부서)협의, 도시계획위원회 심의 등	: ’20. 4.∼10.

○ 장기미집행시설 일몰제 실효대상시설 고시      : ’20. 7.

○ 장기미집행 도시계획시설 단계별 집행계획(변경) 공고 : ’20. 8.∼10.

○ 도시관리계획 재정비 결정 및 지형도면 승인 고시 : ’20. 10.

생태도시계획팀

서학동 예술마을 지구단위계획 수립

○ 다양한 예술인들이 거주하며 작품 활동을 하고 있는 서학동 예술마을의 활성화를 도모하고 문화예술공간으로서의 지속성 유지

□ 사업개요

○ 용역기간 : 2019. 3.∼2020. 6.

○ 공간범위 : 완산구 서서학동 및 동서학동 일원(167,777.3㎡, 5만평)

○ 용도지역/지구 : 제1종일반주거지역(4층이하)

○ 주요내용 : 지구단위계획구역 지정 및 계획수립

- 건축물 용도, 건폐율, 용적률, 높이, 기반시설 및 경관 등에 관한 사항

□ 추진상황

○ 용역착수(도시관리계획 재정비 용역 포함) 및 자료수집	: ’19. 3.

○ 기초조사 현황분석 및 관리방향 설정	: ’19. 4.

○ 타 지역 사례조사 및 주민의견 수렴	: ’19. 6.∼7.

- 도시재생활성화지역 : 서울 성수동, 광주 양림동 역사문화마을 등

○ 주민의견수렴 및 전문가 자문	: ’19. 7.∼12.

- 주민협의체, 도시재생현장지원센터, 공공디자인단, 주민협의회 등

○ 지구단위계획(안) 작성 및 관계부서 사전 협의	: ’20. 1.∼2.

□ 금후계획

○ 도시관리계획(지구단위계획) 입안 보고	: ’20. 2.

○ 주민의견 청취 및 관계기관(부서) 협의(영향평가 심의 등)	: ’20. 3.∼5.

○ 도시건축공동위원회 심의 및 지구단위계획 결정 고시 : ’20. 6.

생태도시조성팀

지속가능한 생태도시 종합계획 세부실천계획

○ 생태도시 종합계획에 따른 5대 목표와 61개 세부실천계획 추진

○ 생태도시 종합계획 실천을 통한 지속가능한 생태도시 구현

□ 단계별 추진 전략

○ 1단계(준비단계) : 2016.∼2017.

- 조직구성, 조례제정, 시민홍보 및 참여(역량강화), 우선 및 시범사업 진행

○ 2단계(기반구축단계) : 2018.∼2020.

- 생태도시 근간사업 및 시민과 함께하는 사업 추진

○ 3단계(확산단계) : 2021.∼2025.

- 생태도시 관련 사업 본격화(파급효과가 큰 사업 우선) 및 정기적 평가(피드백)

□ 추진상황

○ 생태도시위원회 운영 : 4회, 15건 자문(아중천 생태하천 복원사업 등)

○ 이끌림 교육 실시 : 6회(토목‧건축‧녹지‧지적 등 관련 공무원 대상)

○ 세부실천계획 추진사항 점검(분기별) : 20개부서, 4회

○ 생태도시 구현에 파급효과가 큰 주요사업 선정(분기별) : 9건

- 대 상 : 전주 시민햇빛발전소 조성사업 등

○ 사업계획 수립시 저영향개발(LID)기법 반영 : 41건

○ 에너지 자립화를 위한 신재생에너지 이용 권고 : 198건

- 대 상 : 민간 신축 건축물 허가시(연면적 500㎡ 이상)

○ 전주시 생태도시종합계획 수립 및 운영에 관한 조례 개정 : ’19. 12.

- 내 용 : 공동위원장제 도입, 분과위원회 통합(4개⇒2개 분과)

□ 금후계획

○ ’20년 생태도시 5대 목표 달성을 위한 지표 선정 및 목표치 결정

○ 생태도시위원회 운영(수시)

○ 생태도시 세부실천계획 추진사항 점검 및 주요사업 발굴

○ 이끌림 교육 실시(분기별)

토지관리팀

2020년도 개별공시지가 조사

○ 정확한 지가 산정을 통한 지가 공신력 제고 및 재산권 보호

○ 토지관련 국세‧지방세 및 각종 부담금 부과기준으로 활용

□ 사업개요

○ 근거법률 : 부동산 가격공시에 관한 법률

○ 대상필지 : 141,469필지(표준지 3,469필지)

- 사유지 124,058필지 / 국‧공유지 17,411필지

○ 조사기준일 : 연 2회

- (정기분) 1. 1. 기준 개별공시지가 ⇒  5. 29일 결정·공시

- (수시분) 7. 1. 기준 개별공시지가 ⇒ 10. 30일 결정·공시

□ 추진상황

○ 1. 1. 기준 개별공시지가 토지특성조사	: ’19. 12. 9.∼’20. 2. 10.

○ 표준지 공시지가 평가가격 심의	: ’20. 1. 10.

※ 결정내역 : 3,469필지 [완산 1,745 / 덕진 1,724] ⇒ 원안의결

○ 1. 1. 기준 개별공시지가 산정	: ’20. 2. 13.∼3. 13.

□ 금후계획

○ 1. 1. 기준 개별공시지가 열람 및 의견제출	: ’20. 4. 14.∼5. 4.

○ 1. 1. 기준 개별공시지가 결정·공시	: ’20. 5. 29.

○ 1. 1. 기준 결정지가 이의신청지 검증·재공시	: ’20. 5. 29.∼7. 27.

○ 7. 1. 기준 개별공시지가 산정, 열람 및 의견제출	: ’20. 7. 27.∼9. 21.

○ 7. 1. 기준 개별공시지가 결정·공시          : ’20. 10. 30.

○ 7. 1. 기준 결정지가 이의신청지 검증·재공시	: ’20. 10. 30.∼12. 28.

토지관리팀

지적재조사 사업 추진

○ 토지의 현실경계와 지적공부상 경계가 일치하지 않는 지적공부를
현실에 맞게 정비하고 수치화 하여 시민의 재산권 행사 불편해소

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2013. ∼ 2030.(18개년)

○ 사업대상 : 불부합지 66,077필지(23.7㎢) / 전체 192,874필지의 34.2%

○ 총사업비 : 8,200백만원(’20년 사업비 : 602백만원)

○ 사업지구 : 9개지구 5,337필지 / 1,711천㎡(진행중인 사업)

(단위 :필, 천㎡, 명)

구 분	사 업 지 구		필지수	면적	토지소유자
2018년	소 계		1,344	191	683
	완산	서서학지구(서서학동 189-39 일원) 물왕멀지구(중노송동 399-44 일원)	666	95	371
	덕진	어은지구(진북동 947-1 일원)	678	96	312
2019년	소 계		1,474	711	772
	완산	동완산지구(동완산동 369 일원)	706	113	321
	덕진	여의지구(여의동 530-4 일원)	768	598	451
2020년	소 계		2,486	809	1,049
	완산	서완산지구(서완산동1가 1 일원)	1,242	173	544
	덕진	호성1, 2, 3지구(호성동2가 37-1 일원)	1,244	636	505

□ 추진상황

○ ’18년 사업지 경계 결정 및 대장 작성	: ’19. 1.∼ 12.

○ ’19년 사업지 측량완료	: ’19.12.

○ ’20년 사업지 실시계획 수립 및 동의서 징구	: ’20. 1.∼ 4.

□ 금후계획

○ ’20년 사업지 지구지정	: ’20. 4.

○ ’19년 사업지 경계조정 및 의견수렴	: ’20. 3.∼ 6.

○ ’18년 사업지 완료공고 및 지적공부 정리	: ’20. 8.

공간정보팀

건설사업지 드론촬영과 영상제작 추진

○ 도시개발사업 등 건설사업 대상지에 대하여 사업구상 단계부터 완공시까지 단계별로 드론 촬영을 실시하고 관련 영상을 제작하여 사업 과정에서 참고자료로 활용하고 기록물로 관리하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 계속

○ 대    상 : 건설사업지역 34개소(도시개발사업·도로·하천·공공건축물 등)

부 서 명	대상지	부 서 명	대상지	부 서 명	대상지
생태도시계획과	2	한국철도시설공단	1	시민의숲1963추진단	2
건 축 과	1	천만그루정원도시과	3	-	-
걷고싶은도시과	19	신 도 시 사 업 과	6	-	-

○ 사 업 비 : 115백만원

- 드론 및 고성능 컴퓨터 구입 : 25백만원

- 드론영상 관리시스템 구축   : 90백만원

○ 사업내용

- 건설사업 대상지에 대하여 사업 단계별로 드론 촬영을 실시하고 관련 영상을 제작하여 사업과정에서 참고자료로 활용

-「드론영상 관리시스템」에 등록하여 영상 기록물로 관리

□ 추진상황

○ 2019년 추진실적 : 6개부서 / 22개소

○「드론으로 보는 오늘의 전주」전시회 개최(시청로비)   : ’20. 1. 21. ∼ 23.

□ 금후계획

○ 드론영상 촬영 실시 및 영상 제작	: 매월

○ 드론영상 촬영 및 제작을 위한 장비 구입 추진	: ’20. 2.∼ 4.

○「드론영상 관리시스템」구축	: ’20. 3.∼ 6.

○「드론영상 관리시스템」에 영상물 등재	: ’20. 7.∼12.

주소정보팀

찾기 쉬운 도로명주소 생활화 추진

○ 도로명주소 안내시설물 확충 및 정비와 홍보 활성화를 통해 시민
생활 편의 제공 등 도로명주소 생활화 지속 추진

□ 사업개요

○ (안내시설물 확충 및 정비) 도로명판, 기초번호판, 건물번호판 등

○ (임차인 주소사용 편의 제공) 다가구 주택 등에 대한 상세주소 부여

○ (사용자 중심 맞춤형 홍보) 도로명주소 원리 이해 중심 맞춤형 교육 실시

□ 추진상황

○ 안내시설물 확충 및 정비

- 확 충 : 1,044개소(도로명판 911 / 기초⋅국가지점번호판 133)

- 정 비 : 4,339개소(도로명판  20 / 건물번호판 4,319)

○ 상세주소 부여 : 736개소(신청 152 / 직권 584)

○ 도로명주소 원리이해 중심 홍보 추진

- 도로명주소기반 행사장 조성 및 홍보관 운영 : 2회

- 초등학생 대상 방문교육 홍보 : 5회 135명

- 스토리텔링기반 2020년도 도로명주소 홍보 달력 제작 : 6,200부

□ 금후계획

○ 안내시설물 확충(도로명판, 국가지점번호판)      : ’20. 2. ∼ 10.

○ 안내시설물 일제조사 추진 및 정비              : ’20. 2. ∼ 11.

○ 상세주소 부여 추진                              : ’20. 2. ∼ 12.

○ 도로명주소 이용 활성화를 위한 홍보 활동 지속 추진 : ’20. 2. ∼ 12.

- 찾아가는 도로명주소 교육 실시

- 축제⋅행사장을 도로명주소 기반으로 조성하고 홍보관 운영

천만그루정원도시과  소 관

□	천만그루 정원도시 전주 종합계획 수립 용역	----	17
□	도시숲 조성	----	18
□	도시 바람길숲 조성	----	19
□	혁신도시 미세먼지·악취 저감숲 조성	----	20
□	시민과 함께하는 정원문화 확산	----	21
□	전주 지방정원 조성	----	22
□	덕진공원 전통정원화 사업	----	23
□	장기미집행 도시공원 실효대책 추진	----	24
□	산림보호 및 숲 복지서비스 제공	----	25

천만그루기획팀

천만그루정원도시 전주 종합계획 수립 용역

○ 열섬현상 등 기후변화에 대응하고 생물의 다양성을 복원하여 전주를      쾌적하고 아름다운 도시, 인간과 자연이 공존하는 회복력 있는       도시로 만들기 위한 종합계획 수립 필요

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. 7.∼2020. 6.

○ 위    치 : 전주시 전 지역

○ 사 업 비 : 287백만원(시비 287)

○ 사업내용 : 천만그루정원도시 개념설정 및 종합계획 수립, 천만그루  나무심기 조성계획, 정원문화 함양 및 정원산업 육성 방안, 한옥마을 정원조성 전략 수립

□ 추진상황

○ 용역 착수 및 착수보고회                      : '19. 7. 29.

○ 천만그루정원도시 시민원탁회의 및 전문가 포럼 : '19. 8. 27.∼28.

○ 국공유지 대상 현장조사 및 조성방향 검토	: '19. 9.∼11.

○ 한옥마을 정원조성 계획 반영(과업추가)	: '19. 11.

○ 천만그루정원도시 학술포럼 개최                : '19. 11. 8.

○ 용역 제1차 중간보고회                         : '19. 12. 10.

○ 추진방향 논의를 위한 워크숍 개최              : '20. 2.

□ 금후계획

○ 용역 제2차 중간보고회                         : '20. 3.

○ 용역 제3차 중간보고회	및 시민공청회          : '20. 4.

○ 최종보고 및 용역 준공                         : '20. 6.

천만그루조성팀

도시숲 조성

○ 도심 곳곳 어디서나 숲을 만날 수 있도록 도시 숲을 조성하여,

미세먼지 문제와 기후변화에 대응하고 도시전체를 숲과 정원이

어우러진 정원도시로 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1.∼12.

○ 사업규모 : 10개 사업 / 54개소

※ 녹색 쌈지숲 조성 8, 도로변 가로정원 조성 7, 주민참여형 마을정원 2,

팔복동 천년문화 테마숲 조성 8, 통학로 녹지조성 3, 복지시설 나눔숲 1,

기린대로 가로정원 조성 1, 명상숲 3, 도시공원 생태적환경개선 20, 전군도로 벚꽃길 조성 1

○ 총사업비 : 5,398백만원('20년 본예산 3,606, 명시이월 1,792)

○ 사업내용 : 도심 내 녹색 숲 및 쉼터공간 조성

□ 추진상황

○ '19년 도시숲 조성 완료(11개 사업 / 27개소)	: '19. 1.∼12.

- 도시숲 4 (9개소), 온통숲 2 (10개소), 가로녹화 1, 띠녹지 1, 명상숲 1 (4개소), 나눔숲 1, 벽면녹화 1

○ '20년 산림청 녹색자금 지원사업 선정(나눔숲)       : '19. 10.

○ '20년 환경부 기후변화대응 지원사업 선정(통학로 녹지조성) : '19. 10.

○ '19년 팔복동 테마숲 조성 실시설계 용역 완료      : '19. 12.

○ 도시림등의 조성·관리 심의위원회 개최                : '20. 1. 20.

- 2개 사업(녹색 쌈지숲, 도로변 가로정원 조성)에 대한 사업대상지 우선순위 결정

○ 사업별 조성사업 실시설계용역 발주 의뢰           : '20. 1.

□ 금후계획

○ 사업별 실시설계 및 행정절차 이행	: '20. 1.∼4.

○ '19년 팔복동 테마숲 조성사업 추진(이월사업)       : '20. 1.∼6.

○ 도시숲 조성사업 추진                            : '20. 1.∼12.

천만그루조성팀

도시 바람길숲 조성

○ 도시 외곽의 맑은 찬공기를 도심으로 끌어들여 대기정체 해소 및

공기순환 촉진을 통한 열섬현상 완화와 미세먼지 저감으로 쾌적

하고 살기 좋은 생활환경 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. 1.∼2021. 12.(3개년)

○ 위    치 : 백제대로, 백제대로변 교차도로 일원

○ 사업규모 : 20ha

○ 총사업비 : 20,000백만원(국비 10,000, 시비 10,000)

○ 사업내용 : 도심열섬현상 완화 및 미세먼지 저감 등을 위한 도시 바람길숲 조성

바람생성숲		디딤숲·확산숲		연결숲		도시내 맑은 공기순환
(도시외곽 산림)		(도시내 거점숲)		(바람생성숲,거점숲 연결)
조림·숲가꾸기 등		도시 거점숲, 옥상·벽면 등 녹화		하천, 가로수 병렬식재 등 녹지축 연결

□ 추진상황

○ 중기지방재정계획 및 지방재정 투자 심사(중앙심사)   : '19. 1.∼3.

○ 전문가 자문(과업지시서, 제안서 등)               : '19. 2.∼5.

○ 협상에 의한 계약 등 행정절차 이행                : '19. 7.∼9.

○ 착수 보고회 및 산림청 자문단 현장 컨설팅 개최   : '19. 11. 7.

○ 시민단체, 전문가, 용역업체 연구진 등 워크숍 개최  : '19. 12.

□ 금후계획

○「도시 바람길숲 조성 기본 및 실시설계용역」추진      : '19. 10.∼'20. 9.

○ 전문가 자문, 도시림등의 조성·관리 심의위원회 심의 등   : '20. 5.∼6.

○ 일상감사(시) 및 원가심사(도) 의뢰                    : '20. 7.

○ 도시 바람길 숲 조성사업 추진                     : '20. 9.∼'21. 12.

천만그루조성팀

혁신도시 미세먼지·악취 저감숲 조성

○ 심각한 사회적 문제로 떠오르고 있는 미세먼지와 혁신도시 지역의  악취 저감을 위해 혁신도시 내 유휴부지에 복합 기능성 경관숲을  조성하여 아름답고 청정한 전북 만들기 실현과 주민들의 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1.∼2022. 12.(3개년)

○ 위    치 : 혁신도시, 만성지구 일원

○ 사업면적 : 10ha

○ 사 업 비 : 10,000백만원(국비 5,000, 시비 5,000)

※ 2020년 예산 : 2,500백만원(국비 1,250, 시비 1,250)

○ 사업내용 : 미세먼지 흡착, 흡수 및 악취 저감을 위한 숲 조성

□ 추진상황

○ 미세먼지·악취차단숲 조성 관련 전라북도․산림청 협의 : '19. 11.

○ 지방재정투자심사 및 중기지방재정계획 제출       : '20. 1.

□ 금후계획

○ 지방재정투자심사 및 중기지방재정계획 반영      : '20. 1.∼3.

○ 예산 성립전 사용신청(지방비 추경 편성)          : '20. 3.

○ 기본 및 실시설계용역 추진                       : '20. 3.∼8.

- 혁신도시 미세먼지·악취 차단숲 조성 관련 입주기관 협의 등

- 의견수렴, 산림청 및 전문가자문, 행정절차 이행 등

○ 원가심사 및 일상감사                           : '20. 7.∼8.

○ 조성사업 추진                                   : '20. 9.∼'22. 12.

정원문화산업팀

시민과 함께하는 정원문화 확산

○ 시민들이 정원을 쉽게 접하고 스스로 가꿀 수 있는 환경을 조성하고      생활 속 정원문화 확산으로 녹색복지를 실현하여 시민이 다함께      행복해지는 천만그루 정원도시 구현

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1.∼12.

○ 위    치 : 전주시 일원

○ 사 업 비 : 546백만원

○ 사업내용

- (정원 교육) 초록정원사 양성, 정원 특강 및 투어 등

- (정원문화의 장) 아름다운 정원 공모전, 천만그루 정원도시 국제 심포지엄 개최

- (시민참여 정원 조성) 주민참여형 어울림정원 및 마을정원·쌈지정원 조성

- (시민헌수) 시민의 숲 조성 동참 및 기업참여숲 등

□ 추진상황

○ 우리마을 어울림정원 조성(38개소)	: '18. 9.∼'19. 12.

○ 시민헌수 추진(헌수금 250백만원, 기업참여숲 3개소)	: '18. 11.∼'19. 12.

○ 쌈지정원 및 기업참여 정원 조성(7개소)	: '19. 3.∼11.

○ 시민참여 정원특강 및 투어(6회)	: '19. 3.∼12.

○ 제1기 초록정원사 양성(2개반 61명)	: '19. 8.∼12.

○ 주민참여형 마을정원 조성(1개소)	: '19. 9.∼12.

□ 금후계획

○ 시민헌수 추진(기업참여숲 3개소)	: '20. 1.∼12.

○ 초록정원사 양성 및 정원특강 등 정원교육 강화	: '20. 3.∼12.

○ 주민참여형 어울림정원 및 쌈지정원 조성(20개소)	: '20. 3.∼12.

○ 천만그루정원도시 국제 심포지엄 개최	: '20. 6.∼7.

- 조직위원회 구성 및 운영('20. 2.∼7.)

○ 아름다운 정원 공모전 개최	: '20. 9.∼12.

꽃도시조성팀

전주 지방정원 조성

○ 양묘장, 자연생태체험학습원(구.호동골 쓰레기매립장)에 테마정원,

가든센터, 정원공방, 아중호수와 연계한 생태교량을 설치하고 묵방산      (행치봉)과 연계한 전주시만의 차별화된 정원을 조성하여 전주시      대표 관광 인프라 구축

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019.∼2023.(5개년)

○ 위    치 : 전주시 덕진구 우아동1가 856번지 일원(양묘장, 아중호수 일원)

○ 규    모 : 지방정원 30㏊, 생태교량 1식

○ 사 업 비 : 80억원(국 14, 도 30, 시 36)

□ 추진상황

○ 기본구상용역 전문가 자문                    : '19. 9.

○ 지방정원 기본구상 용역 추진계획 보고        : '19. 10.

○ 용역(협상에 의한 계약) 사전협의 및 일상감사 : '19. 10.

○ 협상에 의한 계약 등 행정절차 이행           : '19. 11.∼12.

○ 기본구상 용역 착수                          : '19. 12. 20.

□ 금후계획

○ 지방정원 기본구상 용역 추진                 : '19. 12.∼'20. 5.

○ 지방정원 조성예정지 지정신청(산림청)         : '20. 6.∼7.

○ 지방재정 투자심사(도)                        : '20. 7.∼10.

○ 토지매입                                    : '20. 7.∼12.

○ '21년 지방정원 사업신청(균특지방이양사업 예산)      : '20. 9.

○ 지방정원 기본 및 실시설계 용역 추진           : '21. 1.∼12.

- 다울마당 및 의견수렴, 주민공청회, 인허가 등 행정절차 이행

○ 사업시행	: '22. 1.∼'23. 12.

공원조성팀

덕진공원 전통정원화 사업

○ 덕진공원을 전주의 역사성과 정체성 등을 대표할 수 있는 전통정원으로      조성하여 한옥마을과 연계한 제2의 관광거점공간으로 육성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017.∼2020.(4개년)

○ 위    치 : 덕진공원 연못 내

○ 사업규모

- 연화교 재가설(L=284m, B=3.0m)

- 연화정(A=393.75㎡) 재건축, 창포원(A=1200㎡) 조성 등

○ 총사업비 : 8,090백만원(특교 400, 도비 2,048, 시비 5,642)

- 연화교 : 5,000백만원(특교 400, 도비 1,165, 시비 3,435)

- 연화정 : 3,000백만원(도비 838, 시비 2,162)

- 창포원 : 90백만원(도비 45, 시비 45)

□ 추진상황

○ 연화교 재가설 실시설계 용역                  : '16.  9.∼'18. 11.

○ 연화교 전면통제                              : '18. 11.

○ 연화교 재가설 공사(1차분/전체분) 착공         : '18. 11.

○ 연화정 정밀 안전 진단 용역 완료 및 정비방안 설문조사  : '19. 4.∼5.

○ 연화정 재건축공사, 창포원 정비공사 실시설계용역 착수  : '19. 8.∼9.

○ 연화교 1차분 준공 및 2차분 착공               : '19. 12.

○ 연화정 관련 공원조성계획 도시공원위원회 심의    : '20. 1.

□ 금후계획

○ 연화정 및 창포원 공사 발주 및 착수            : '20. 3.

○ 창포원 공사완료                              : '20. 6.

○ 연화교 재가설 공사완료                       : '20. 7.

○ 연화정 공사완료                              : '20. 12.

공원조성팀

장기미집행 도시공원 실효대책 추진

○ 2020년 7월 장기미집행 도시공원 일몰제 시행으로 실효 위기에 있는

“도시의 허파” 공원을 지키기 위한 효과적이고 실효성 있는 관리방안 모색

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020.∼2025.(1단계)

○ 위    치 : 전주시 관내 일몰제 대상공원 15개소

○ 규    모 : 개발가능지역 2.02㎢ 매입

○ 사 업 비 : 145,000백만원

※ ’20년도 : 30,000백만원(본예산 13,000백만원, 1회추경(계획) 17,000백만원)

○ 사업내용 : 미집행 공원내 사유지 9.44㎢ 중 개발가능지역 2.02㎢ 우선 매입

※ 1단계 대상지 :「전주시 도시계획조례」제17조의 규정에 따라 개발행위허가의

일반적 기준(표고 75미터 미만, 경사도 15도 미만)에 제한이 없는 지역

□ 추진상황

○ 장기미집행 도시공원 관리방안 수립용역 착수       : '18. 5.

○ 시의회 도시건설위원회 간담회 개최(3회)            : '19. 2.∼9.

○ 장기미집행 도시공원 대책 협의회 개최(5회)        : '19. 5.∼12.

○ 장기미집행 도시공원 실시계획인가 용역 착수	: '19. 8. 7.

○ 장기미집행 도시공원 관리계획 수립(변경)            : '19. 9. 10.

○ 각종 제영향평가(교통·환경·재해·문화재 등)용역 착수  : '19. 9. 17.

○ 토지보상 우선순위 결정(안) 주민의견 수렴          : '20. 1.∼2.

□ 금후계획

○ 토지보상 우선순위 결정(도시공원위원회)           : '20. 2.

○ 공원조성계획 결정(변경) 및 고시                  : '20. 3.

○ 실시계획인가 및 제 영향평가 용역 완료           : '20. 4.

○ 실시계획 인가 고시                              : '20. 5.

○ 공원 내 사유지 매입 추진                        : '20. 3.∼12.

산림관리팀

산림보호 및 숲 복지서비스 제공

○ 산림재해 대응체계 확립으로 산림피해를 최소화하여 소중한 산림자원 보호

○ 쾌적하고 건강한 도시산림 조성으로 다양한 산림복지서비스 제공

□ 사업개요

○ 산림면적 : 6,249ha

○ 사 업 비 : 3,347백만원

- 소나무재선충병 방제 : 141, 산림병해충 민간 컨설팅 : 7, 산불인력 및 장비 : 2,309,  학산치유의 숲, 초록바위 달맞이 문화마당 조성 : 60, 유아숲체험원 운영‧조성 : 370, 산림휴양 인권숲 조성 및 등산로 유지관리사업 : 460

○ 추진사업

- 소나무재선충병 방제 : 150ha, 산림병해충 민간 컨설팅 : 1식

- 산불인력 및 장비 : 159명(감시‧진화), 4,055점(진화차량, 감시카메라, 무전시스템 등)

- 학산치유의 숲, 초록바위 문화마당 조성 : 타당성 및 기본계획 용역 각 1식

- 유아숲체험원 운영‧조성 : 4개소(운영 3, 신규조성 1)

- 산림휴양 인권숲 조성 : 1개소, 등산로 유지관리사업 : 기린봉 등 10km

□ 추진상황

○ 소나무재선충병 방제사업 실시설계 용역(발생지 주변 2km이내)   : '20. 1. 16.∼

○ '20년 봄철 산불방지 대책본부 운영                 : '20. 2. 1.∼

- 감시단 운영 159명(감시원 67, 진화대 80, 사회복무요원 12)

○ 치유의 숲 및 초록바위 복원사업 용역 자문 및 협의  : '20. 2.

- 기본방향 및 용역 과업지시서 전문가 자문, 관련부서(전북도) 협의

○ '20년 유아숲체험원 운영사업자 모집을 위한 일상감사 의뢰    : '20. 2.

○ 산림휴양 인권숲 조성 및 등산로 유지관리사업 추진  : '20. 2.

- 사업대상지 현장조사, 자료수집

□ 금후계획

○ 소나무재선충병 방제사업 추진(단목처리 1,500본)   : '20. 2.∼5.

○ '20년 봄철 산불방지 예방 및 감시 활동           : '20. 2.∼5.

○ 산림병해충 민간 컨설팅 용역 추진                : '20. 3.∼10.

○ 치유의 숲 및 초록바위 문화마당 조성 기본계획 용역 추진    : '20. 3.∼10.

○ '20년 유아숲체험원 조성                            : '20. 3.∼12.

○ 산림휴양 인권숲 조성 및 등산로 유지관리사업 추진  : '20. 3.∼12.

건 축 과  소 관

□	효율적인 옥외광고물 관리로 쾌적한 도시경관 조성	----	27
□	노후 공동주택 관리비용 지원 사업	----	28
□	주민참여예산 지원 사업	----	29
□	소규모 공동주택 관리비용 지원 사업	----	30
□	2030 도시·주거환경정비기본계획 수립	----	31
□	재개발·재건축 정비 사업	----	32
□	주거지지원형 도시재생 뉴딜사업	----	33
□	3단계 도시주거환경개선 사업	----	34
□	동산동 우리마을 가꾸기 사업	----	35
	지역건축안전센터 설립 업무 추진	----	36

.

광고물행정팀

효율적인 옥외광고물 관리로 쾌적한 도시경관 조성

○ 옥외광고물의 체계적이고 효율적인 관리로 불법광고물을 최소화하여
깨끗한 도시경관 개선과 선진광고문화 정착

□ 사업개요

○ 기   간 : 연 중

○ 대   상 : 주요도로변 등에 무단 설치된 불법유동광고물

○ 내   용 : 현수막 등 불법 유동광고물 정비를 통한 쾌적한 도시경관 조성

□ 추진상황

○ 불법 유동광고물 정비

(’19년 12월말 기준)

정비실적(건)						행정처분(건/천원)
계	현수막	입간판	벽보	전단	에 어 라이트	계	이행 강제금	과태료
5,339,256	169,783	1,424	205,668	4,961,254	1,127	368 (556,695)	3 (1,780)	365 (554,915)

○ 공공 및 정당 현수막 등 옥외광고물 설치 자제 협조요청	: 5회

○ 설, 축제기간 등 취약시기별 불법광고물 일제정비 실시	: 8회

○ 전주시·경찰서 불법광고물 야간 합동 단속('19.6.∼12.)	: 5회

□ 문제점 및 대책

○ 주말 및 야간 이용 게릴라식 분양광고 불법광고물 게첩

□ 불법광고물 게첩에 대한 과태료 부과 강화 등 강력한 행정조치

○ 공공목적의 공사, 교통안내, 선거관련(옥외광고물 관리법 적용배제 대상)

현수막에 대한 광고물 단속 형평성 논란

□ 시·산하기관 사업부서 및 선관위 등 공공목적 현수막 실명제 적용, 상시 관리체계 구축

□ 금후계획

○ 설·추석·문화 축제 등 취약시기별 불법광고물 일제정비

○ 토·일(공휴일) 불법광고물 단속 실시

공동주택팀

노후 공동주택 관리비용 지원 사업

○ 주거환경이 열악하고 자체관리 능력이 부족한 노후공동주택에 대해
관리비용 일부를 지원하여 주거환경개선 및 서민 주거안정 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 12.

○ 지원근거 : 공동주택관리법 제85조 및 전주시 주택조례 제4조

○ 사업대상 : 20년 이상 노후공동주택 총 398개단지 중 30개 단지

○ 총사업비 : 600백만원(시 100%)

○ 지 원 액 : 단지별 사업비의 70% 이하로서 2,000만원 이하 보조

○ 사업내용 : 부대시설 등 시설물 보수비용 일부지원

□ 추진상황

○ '20년 노후공동주택 관리비용지원사업 시행계획수립	: '19. 12. 30.

- 옥상방수, 내외벽 도색 등 노후 시설물 보수 : 26개 단지

- 경비원 등 근로자 휴게시설 설치지원        : 4개 단지

○ 공동주택 관리비용 사업신청 홍보 및 접수 통보(시→구) : '20. 1. 2.

※ 기지원 실적(’05∼’19년) : 479개단지 80,823세대, 6,789백만원

□ 금후계획

○ 노후 공동주택 지원사업 신청단지 현지조사	: '20. 2.

○ 공동주택지원 심사위원회 개최 및 대상단지 선정	: '20. 2.

○ 사업추진 및 준공정산	: '20. 3.∼11.

공동주택팀

주민참여예산 지원 사업

○ 노후된 주민공동이용시설 관리비용 지원을 통한 공동주택 주민
편익증진 및 전주시 도시미관 개선에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 12.

○ 지원근거 : 공동주택관리법 제85조 및 전주시 주택조례 제4조

○ 사업대상 : 10년 이상 노후공동주택 총 491개 단지 중 84개 단지

○ 사 업 비 : 1,880백만원(도 80%, 시 20%)

○ 지 원 액 : 단지별 총 공사비의 70% 이하(최대 3,000만원)

○ 사업내용 : 노후 주민공동이용 시설 등 관리비용 지원 및 개선

□ 추진상황

○ 전북도「지역밀착형 주민제안 공모계획」협조(기획예산과)	: '19. 10.  1.

○「지역밀착형 주민제안 공모계획」에 따른 신청	: '19. 10.

○ 시 주민참여예산위원회 심의(기획예산과)	: '19. 10. 24.

○ 도 주민참여예산위원회 심의(도 예산과)	: '19. 10. 30.

○ 2020년 주민참여예산 가내시 알림(도 주택건축과)	: '19. 11. 18.

□ 금후계획

○ 보조금 교부신청서 및 사업계획서 제출(시→도)	: '20. 2.

○ 보조금 교부결정 및 송금(도→시)	: '20. 2.

○ 주민참여예산 재배정(시→구) 및 사업시행	: '20. 3.        ○ 사업추진 및 준공정산	: '20. 3.∼12.

건축정책팀

소규모 공동주택 관리비용 지원 사업

○ 자체관리 능력이 부족한 소규모 노후 공동주택의 관리 비용의 일부
지원으로 열악한 주거환경을 개선하여 서민 주거생활 안정 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1 ∼ 12.

○ 지원근거 : 전주시 소규모공동주택 관리에 관한 지원 조례

○ 사업대상 : 20년 이상의 노후된 4세대 이상 19세대 이하 소규모   공동주택(총 165개단지 중 5개 단지)

○ 사 업 비 : 100백만원(시 100%)

○ 지 원 액 : 단지별 사업비의 80% 이하로서 2,000만원 이하 보조

○ 사업내용

- 소규모 공동주택 부대시설 및 옥상부분 등 유지․보수비용 지원

- 석축․옹벽․절개지 등 긴급 보수가 필요한 사업비 지원

□ 추진상황

○ 전주시 소규모공동주택 관리에 관한 지원 조례 제정   : '16.  3.

- 20년이상 노후된 5세대 이상 19세대 이하 공동주택

○ 전주시 소규모공동주택 관리에 관한 지원 조례 개정   : '20.  1.

- 20년이상 노후된 4세대 이상 19세대 이하 공동주택

○ 지원대상단지 홍보·신청 및 심사(시→구)	: '20.  1.∼

※ 기 지원실적('16년∼'19년) : 21개단지 293세대, 359백만원

□ 금후계획

○ 소규모 공동주택 지원사업 신청단지 현지조사	: '20.  2.

○ 공동주택지원 심사위원회 개최 및 대상단지 선정	: '20.  2.

○ 사업추진 및 준공정산	: '20. 3.∼12.

주택재개발팀

2030 도시·주거환경정비기본계획 수립

○ 기 수립된 2020 전주시 도시·주거환경정비기본계획의 법정 재정비 주기 도래

○ 도시·주거환경정비와 관련된 제반 관련 법규의 개정, 변경 및 여건 변화에
따라 2030 전주시 도시·주거환경정비기본계획의 변경 수립 필요

□ 사업개요

○ 공간범위 : 전주시 도시지역 내 구 시가지 일원(13,668,000㎡)

○ 용역기간 : 2019. 6. ∼ 2020. 6.(착수일로부터 12개월)

○ 용역금액 : 584백만원(도시․주거환경정비기금)

○ 법적근거 : 도시 및 주거환경정비법 제4조에 따라 10년 단위 수립

- 2020 전주시 도시 및 주거환경정비 기본계획 수립 완료 시행 중

○ 주요내용

- 전주시 특성을 고려한 정비방향 제시, 건축물의 밀도계획 등

- 기존 정비예정구역 존치 또는 해제와 해제지역의 종합관리계획

□ 추진상황

○ 2030 기본계획 수립용역 업체선정 및 착수       : '19.  3. ∼ 6.

○ 기초자료 수집 및 여건 분석                    : '19.  6.

○ 정비예정구역 해제 시 관리방안 마련 검토       : '19. 10.

○ 신규(재건축) 정비예정구역 대상지 조사 및 검토  : '19. 11.

○ 전문가 의견 수렴 및 관련부서 협의             : '20.  1. ∼ 2.

□ 금후계획

○ 주민공람·의회 의견청취 및 도시계획위원회 심의    : '20.  3. ∼ 4.

○ 기본계획 결정 및 지형도면 고시                : '20.  5. ∼ 6.

○ 도시․주거환경정비기본계획 결정고시             : '20.  6.

주택재개발팀

재개발·재건축 정비 사업

○ 노후불량주택 개량 및 정비사업 추진으로 도시기능을 회복하고
주거환경개선으로 도시환경 및 주거생활의 질을 높이고자 함

□ 사업개요

○정비(예정)구역 : 29개소(재개발 14, 재건축 15)

구 분		추진위 미구성	추진위 구 성	정비구역 지 정	조합설립 (시공사선정)	사업시행 계획인가	관리처분 /착공	공사완료
합계	29	6	5	3	2	3	6	4
재개발	14		전라중일원, 병무청, 효동,, 성황당, 동부시장	하가		기자촌 종광대2 동양@인근	바구멀1, 태평1, 효자 감나무골	물왕멀
재건축	15	송천롯데, 세원거성, 거성·한성·부광,, 삼천쌍용2, 개나리, 송천무지개		오성대우 세경	효자주공 삼천주공3		우아주공1 삼천쌍용	삼천주공2, 우진태하, 우아주공2

□ 추진상황

○ 사업추진 부진 구역 해제(21개구역)	: ’12. 7. 2.∼’16. 12. 30.

- 태평2, 학암, 쌍용, 반촌, 숭실실고북측, 전주여고일원, 기자촌2, 전주교대인근, 강당재, 월곡,       반월, 문화촌, 다가, 덕진구청 인근, 이동교, 신우@, 진북, 인후, 동초교북측, 낙원@인근, 서원초일원

○ 전주시 도시 및 주거환경정비 조례 개정	: ’17.  4. 28.

- 정비(예정)구역 직권 해제 시 사용비용 보조 등

○ 재개발, 재건축정비사업 행정절차 추진(17개구역)	: ’19년 이전

- 정비구역 지정(오성대우, 삼천주공3), 조합설립인가(종광대2,동양@인근,기자촌,삼천,쌍용, 효자주공),  사업시행계획인가(감나무골), 관리처분계획인가(태평1,효자,우아주공1), 착공 및 분양(바구멀), 준공인가(물왕멀,우진·태하,삼천주공2, 우아주공2)

○ 재개발, 재건축정비사업 행정절차 추진(11개구역)	: ’19. 1. ∼ 현재

- 정비구역 지정(하가,세경), 조합설립인가(삼천주공3), 사업시행인가(기자촌, 종광대2, 동양@인근),   관리처분계획인가(삼천쌍용,감나무골), 착공 및 분양(우아주공1, 효자, 태평1)

□ 금후계획

○ 사업추진 구역은 행정절차 등 민원신청 시 신속 민원처리

○ 공사 중 사업현장 지도감독 강화로 소음·분진 등 주민피해 최소화

하도급관리팀

주거지지원형 도시재생 뉴딜사업

○ 노후화가 가속되고 있고, 생활편의시설이 열악한 주거 밀집지에
대한 도시재생 뉴딜사업 추진으로“주민 삶의 질”개선

□ 사업개요

○ 대 상 지 : 인후/반촌 정비사업 해제구역 일부(A=91,165㎡)

○ 용 역 비 : 20백만원(도시재생과 129백만원 별도)

○ 용역기간 : 2019. 4. ∼ 2020. 2.('19. 8월 일시정지)

○ 용역내용

- 주거지지원형 사업대상지 현황 조사 및 사업계획 수립

- 인후+반촌지역 도시재생 활성화계획 수립

- 국토부 주거지지원형 도시재생 뉴딜사업 공모절차 이행

□ 추진상황

○ 용역 착수 및 추진	: '19. 4.∼8.

○ 활성화계획(안) 주민공청회 및 시의회 의견청취  : '19. 7.

○ '19년 하반기 국토부 공모신청(광역평가)-미선정	: '19. 8.

○ '20년 공모대응을 위한 용역 일시정지	: '19. 8.

□ 금후계획

○ 용역 일시정지 해제 및 활성화계획 보완 작성	: '20. 2.∼3.

○ 도시재생 뉴딜사업(주거지지원형) 공모 신청	: '20. 4.

○ 국토부 공모 평가 및 선정 발표	: '20. 6.

○ (공모선정시) 도시재생 뉴딜사업 추진	: '21∼'24년

※ 공모 선정 이후 투자계획

(단위 : 백만원)
구분	총투자 규 모	기투자	이후 투자계획					비고
		2019년까지	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년~
계	17,667	149	-	4,650	4,650	4,150	4,068
국 비	10,000	-	-	2,500	2,500	2,500	2,500
도 비	1,667	-	-	400	400	400	467
시 비	5,000	149	-	1,250	1,250	1,250	1,101
기 금	1,000	-	-	500	500	-	-	HUG*

* HUG : 주택도시보증공사 도시기금

하도급관리팀

3단계 도시주거환경개선 사업

○ 도시 저소득주민 집단거주, 노후·불량건축물 과밀지역에 대해
기반시설을 정비하여 안전한 주거공간 확보와 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014. ∼ 2020.(7개년)

○ 대 상 지 : 2개 구역(풍남초교 인근, 강당재)

○ 총사업비 : 66.4억원(국비 33.2, 시비 33.2)

(단위 : 백만원)
구분	총투자 규 모	기투자	이후 투자계획		비고
		2019년까지	2020년	2021년
계	6,636	6,636	-	-	국비 교부 완료 이월계속사업비 824백만원
국 비	3,318	3,318	-	-
시 비	3,318	3,318	-	-

○ 사업내용 : 정비기반시설 확충 및 정비

- 도로개설 5개소(L=561m, B=4~10m), 주차장 5개소, 공원 2개소 등

□ 추진상황

○ 도활사업 공모 2개 구역 선정(국교부)	: '13. 10.

○ 지방재정 투‧융자심사 완료	: '13. 11.

○ 정비계획 수립 및 정비구역지정 도시계획위원회 심의	: '14. 12.

○ 정비계획 수립 및 정비구역지정 고시	: '15.  3.

○ 정비계획 사업시행계획서 고시	: '15.  4.

○ 공사 착공	: '17.  8.

※ 풍남초교 준공(’19.11.) / 강당재 공정율 90%(’20.10. 준공예정)

□ 금후계획

○ 강당재 구역 잔여 보상 및 공사 추진	: '20. 1. ∼ 10.

하도급관리팀

동산동 우리마을 가꾸기 사업

○ 주거지재생으로 지역주민에게 최소한의 기초생활 수준 보장

○ 정주여건 개선을 통한 주민커뮤니티 회복 및 지역역량 강화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016. ∼ 2020.(5개년)

○ 위    치 : 덕진구 동산동 610-1번지 일원(A=33,765㎡)

○ 총사업비 : 57.4억원(국비 23.7, 시비 33.7)

(단위 : 백만원)
구 분	총투자 규 모	기투자	이후 투자계획		비고
		2019년까지	2020년	2021년
계	5,736	4,736	1,000	-	국비 교부 완료 이월계속사업비 824백만원
국 비	2,368	2,368	-	-
시 비	3,368	2,368	1,000	-

○ 사업내용

- 도로 4개 노선(L=491m, B=4~8m), 주차장 1개소(1,900㎡)

- 공원 2개소(1,904㎡), 공동이용시설 2개소(1,255㎡) 등

□ 추진상황

○ '16년 도시활력증진개발지역 공모사업 선정(국토부)	: '15.  5.

○ 정비계획 및 정비구역 변경 지정 고시	: '17.  7.

○ 사업시행계획서 고시	: '17. 12.

○ 편입토지 측량, 분할 및 감정평가 완료	: '18.  6.

○ 토지 및 지장물 보상 협의 개시	: '18.  7.

○ 경관심의, 道원가심사 등 사전행정절차 이행 완료	: '19. 10.

○ 미협의 토지 수용재결에 따른 보상금 지급 완료	: '19. 12.

※ 총 보상건수 : 토지 78건, 지장물 26건

○ 공사(토목) 착수	: '19. 12.

□ 금후계획

○ 우리마을 가꾸기 사업 추진                     : '20. 1. ∼ 12.

- 기반시설 사업 추진(도로, 주차장, 공원)

- 주민공동이용시설 건립

건축안전팀

지역건축안전센터 업무 추진

○ 건축법 제87조의2(지역건축안전센터 설립) 및 건축물관리법 시행
('20. 5. 1.)에 따른 건축물의 안전에 관한 사항 및 유지관리에 따른
기술지원 등 건축물 안전에 대한 전문적인 관리체계 운영

□ 사업개요

○ 추진배경 : 건축물 화재, 지진발생 및 건축공사장에 잦은 안전사고
발생에 따른 체계적인 안전관리체계 구축 필요

○ 추진근거 : 건축법 제87조의2 및 같은 법 시행령 제119조의3

○ 사업내용 : 지역건축안전센터 운영 및 전문적인 건축 안전관리

○ 주요업무

- 건축허가 등 관련 건축기준 및 구조기준 적합성 검토․확인

- 건축공사 감리에 대한 관리·감독

- 2020 화재안전성능보강 지원 및 융자사업 추진

- 관할구역 내 건축물의 안전에 관한 사항 및 유지관리에 따른 기술지원 등

□ 추진상황

○ 건축안전팀 신설(팀장 1, 직원 1)	: '19.  7.

○ 전주시 건축조례 개정	: '19. 12.

○ 전문인력(건축사, 건축구조기술사) 채용 중(총무과)	: '20.  1.∼

□ 금후계획

○ 화재안전성능보강 대상 건축물 조사	: '20.  2.∼

○ 지역건축안전센터 운영(전문인력 채용 후)	: '20.  3.∼

○ 건축물관리법 시행에 따른 건축물의 안전 및 유지관리	: '20.  5.∼

주거복지과 소관

□	전주형 주거복지네트워크 운영	----	38
□	저소득층 주거급여 지원	----	39
□	주거복지 서비스 강화 사업	----	40
□	전주형 사회주택 공급 사업	----	41
□	청년 매입임대주택 공급	----	42
□	저소득계층 노후주택 개보수 사업	----	43
□	도심빈집정비 주민공간조성 사업	----	44
□	빈집 플랫폼 운영	----	45
□	부도임대아파트 수선비 지원	----	46
	저소득계층 임대보증금 지원	----	47
	저층주거지 골목길 정비사업 추진	----	48
	해피하우스 사업 내실화	----	49

주거복지정책팀

전주형 주거복지네트워크 운영

○ 주거 및 복지관련 단체, LH 등이 참여하는 민·관 협력 주거복지네트워크와 주거복지 공공건축가를 운영하여, 주거복지 정책 모니터링, 자원연계 및 재능기부를 통한 주거취약계층 주거안정 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 12.

○ 사 업 비 : 5백만원

○ 사업내용 : 자원연계, 주거복지 세미나·토론회·교육 및 주거복지 정책 발굴

주거복지정책 홍보, 주거복지 공공건축가 재능기부(자문 등)

○ 운영체계 : 주거복지네트워크, 주거복지 공공건축가 운영

- 네트워크: 23개 단체 참여(LH 포함 주거 및 복지 관련단체)

- 공공건축가 : 20명 참여(건축사·건설·디자인·부동산·집수리봉사·주거복지 관련 전문가)

□ 추진상황

○ 주거복지네트워크 운영

- 정기회의(4회), 자원연계(집수리·이사서비스) 13가구, 찾아가는 순회설명회 등

- 청년 주거정책 집담회(1회/45명), 주거복지학교 운영(5회/200명)

○ 주거복지 공공건축가 운영

- 자문회의 1회, 워크숍 1회, 시민대상 건축상담(10회/31명, 해피하우스센터 연계)

- 사회주택·빈집정비·해피하우스·자율주택정비사업 등 자문 및 현장 지원

- 주거지재생 분과별 참여(자문 및 현장 지원, 정책개발 지원)

□ 금후계획

○ 주거복지 네트워크 1차 회의 개최	: ’20. 2.

- 2020년 주요사업 공유 및 주거복지사업 연계 논의를 위한 현장 의견 수렴

○ 찾아가는 주거복지 상담 및 주민교육, 주거복지학교 등 개최

○ 주거복지 공공건축가 재능기부 운영	: 연중

주거복지정책팀

저소득층 주거급여 지원

○ 주거가 불안정한 주거 취약계층의 주거비(임차 및 수선유지급여)를      지원함으로써 주거비 부담 완화 및 주거안정과 주거수준 향상 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 12.

○ 사업규모 : 18,045가구

○ 사 업 비 : 22,332백만원(국비 90%, 도비 7% 시비 3%)

- 임차급여 20,832백만원, 수선유지급여 1,500백만원

○ 지원대상 : 소득인정액 기준중위소득 45%이하(1인 790천원, 4인 2,137천원 이하)

○ 지원내용

- 임차가구(임차급여) : 기준임대료를 상한으로 실제임차료 지급

- 자가가구(수선유지급여) : 주택노후도에 따른 주택개보수(경보수, 중보수, 대보수)

□ 추진상황

○ 2019년 주거급여 지원 실적 : 20,156백만원

- 임차급여 : 월 14,328가구(누계 171,938가구) 18,530백만원

- 수선유지 : 345가구(경보수229, 중보수72, 대보수44) 1,626백만원

○ 상반기 주민등록 사실조사시 가구별 주거급여 홍보안내문 배부 : ’20. 1.

□ 중점 추진사항

○ 주거복지 전달체계 역량강화

- 지역사회보장협의체, 통장, 업무담당자, 주거복지네트워크 교육 실시

○ 사각지대 발굴을 위한 주거급여 홍보 추진

- LH 사업과 연계하여 찾아가는 홍보 실시(대학교, 청년몰, 여관밀집지역, 전주역 등)

- 버스정보시스템, 시정홍보지, 홈페이지, 지역 주요행사 주민홍보

□ 금후계획

○ 2020년 수선유지급여 위․수탁 협약(시↔LH)	: ’20. 2.

○ 2020년 주거급여협의체(시, LH) 업무연찬	: ’20. 상반기

○ 주거급여 신청 안내․홍보 및 대상자 발굴	: 연중

주거복지정책팀

주거복지서비스 강화 사업

○ 공공‧민간의 주거복지 자원 및 서비스 수요자 사전파악을 위한 홍보

강화를 통해 주거복지상담‧정보제공‧서비스 연계를 체계화 하고,

전주시 주거복지 정책 효율성 증대에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1.∼12.

○ 사 업 비 : 10백만원

○ 사업내용 : 주거복지서비스 강화 사업

- 주거복지 상담 및 홍보, 교육

- 공공‧민간의 주거복지 정책 안내 매뉴얼 홍보자료 제작 및 배포

(동 주민센터, 민간단체, 시 행사, 홈페이지 등 게재 배포 등)

- 주거환경개선 클린서비스 교육(공간정리·수납교육) 및 봉사단 운영

□ 추진상황

○ 주거복지센터 개소 및 시범운영	: ’19. 4.∼12.

- 홍보 리플렛 1만부 제작 및 배포(주민센터 및 관련 단체, 시 행사)

- 주거복지 상담 및 정보제공 695건

○ 주거복지 주요정책 순회설명회(5회)	: ’19. 6.∼9.

○ 알기 쉬운 주거복지서비스 책자 250부 제작 및 배포	: ’19. 6.∼10.

- 주민센터 및 관련단체 배포, 시 홈페이지 및 SNS 활용 배포

○ 주거복지센터 운영․관리 매뉴얼 마련 및 토론회 개최	: ’19. 9.∼10.

□ 금후계획

○ 주거복지 상담․홍보, 교육 활동	: 연중

○ 주거환경개선 클린서비스교육(공간정리·수납교육) 및 봉사단 운영

- 교육수료생 대상으로 봉사단 구성 : 저소득계층에 클린서비스 제공

○ 주거복지 정책의 홍보 및 맞춤형 서비스로 주거복지 사각지대 해소

○ 주거상향 이동 등 긴급하게 필요한 순환형임대주택(LH소유 20호) 공급 추진

사회주택팀

전주형 사회주택 공급 사업

○ 전주시와 민간단체가 협력하여 주거약자 등의 주거비 부담완화와 주거의 안정성을 확보할 수 있는 수요자 맞춤형 사회주택 공급

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 12.

○ 사 업 비 : 1,000백만원

○ 사업규모 : 민간 토지(건물) 매입을 통해 매년 1개소 이상 공급

○ 사업내용 : 민․관 공동출자 전주형 사회주택 공급

※ 시세 80% 이하 임대료, 최대 20년 임대, 단독·다가구형 사회주택 공급

□ 추진상황

○ 2019년 전주형 사회주택 2개소 24가구 선정․공급 추진

- 효자동 17가구(대학생‧청년), 삼천동 7가구(노인‧청년)

○ 2020년 전주형 사회주택 공급 계획 수립	: ’20. 2.

※ 그간 공급현황 : 3개소, 30가구

- 2017년 15가구(청년 쉐어하우스 5, 계층혼합형 10), 2018년 15가구(여성 청년 15)

□ 중점 추진사항

○ 사업유형 및 공급대상 다각화

- 사업유형 : 토지임대부/건물임대부 방식(신축형, 리모델링형)

- 공급대상 : 청년, 고령자, 문화예술인, 신혼부부, 장애인 등 수요자 맞춤형 공급

○ 사회주택 관계자 협의체 구성․운영

- 전주시‧운영자‧입주자‧주거복지센터 등 관계자 협의체 구성 및 운영 정례화

- 사회주택 운영 현황 및 다양한 사례 공유 등 사업 발전방향 모색

□ 금후계획

○ 전주형 사회주택 공급‧운영사업자 공모, 심사 선정	: ’20. 2.∼4.

○ 전주형 사회주택 공급사업 추진	: ’20. 4.∼12.

사회주택팀

청년 매입임대주택 공급

○ 높은 주거비, 취업률 감소 등으로 어려움을 겪는 청년가구에 저렴한 임대주택을 공급하여 청년층의 주거안정 및 청년인구 유입 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 12.

○ 사 업 비 : 2,388백만원(국비 940, 시비 1,448)

○ 사업규모 : 청년 매입임대주택 24호

○ 사업내용 : 대학교 주변의 기존 주택을 매입하여 만 19세∼39세 무주택 청년에게 시세의 30% 수준의 저렴한 임대주택 공급

□ 추진상황

○ 2019년 청년매입임대주택 2개소 21가구 매입 완료	: ’19. 12.

○ 2020년 국토부 청년매입임대주택 공급 물량 승인(24호)	: ’20. 2.

○ 2020년 청년매입임대주택 공급 계획 수립	: ’20. 2.

□ 문제점 및 대책

○ 대학교 근접 주택은 감정평가액과 실거래 가격 차이가 많아 협의 매수가 어려움

□ 대학교 인근의 대중교통이 편리하고 주거환경이 양호한 위치의 적정 건물 매입 방안 강구

○ 노후주택의 경우 매입가격에 비해 리모델링 및 시설 유지관리비용 과다 소요

□ 건령이 낮고 상태가 양호한 주택을 우선 매입하여 리모델링과 시설 유지관리비용 절감

「기존주택 매입임대주택 업무처리지침」 제6조(기존주택의 매입기준 등)

▸ 건령 15년 이내, 단독주택·다가구주택, 공동주택 및 주거용 오피스텔

▸ 대학교 인근 등 청년층의 수요가 많고 철도역·버스환승시설 인근 등 교통이 편리한 지역

□ 금후계획

○ 청년 매입임대주택 매입 공고	: ’20. 3.∼

○ 청년 매입임대주택 공급 사업 추진	: ’20. 4.∼12.

사회주택팀

저소득계층 노후주택 개보수 사업

○ 저소득계층의 노후주택을 개‧보수하여 열악한 주거환경을 개선하고,

주거안정을 통해 주거 약자의 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 3. ∼ 10.

○ 사 업 비 : 480백만원(도비 192, 시비 288)

○ 사업규모 : 120가구 ※가구당 인건비포함 400만원 한도

○ 사업대상 : 기초생활수급자, 차상위계층 등 중위소득 60%이내 저소득계층

○ 사업내용 : 지붕, 도배․장판, 창호, 보일러 등 집수리 및 소방시설 설치

□ 추진상황

○ 2019년 추진실적 : 총 350가구 개보수 완료            (단위 : 가구)

계	지 붕 (일 반)	지 붕 (슬레이트)	천정‧벽체	도배‧장판	창 호	화장실	보일러	기 타
350	41	22	19	87	58	24	14	85

※ 장애인 등 주거약자의 편의시설 및 주택용 소방시설(소화기, 단독경보형감지기) 설치 : 116가구

○ 집수리 대상가구 신청 접수	: ’20. 2.

○ 집수리팀 전문인력(도배공, 목공, 설비) 채용	: ’20. 2.

□ 중점 추진사항

○ 노후주택의 누수로 인하여 지붕틀 붕괴 위험성 및 벽지·장판 등의 곰팡이 발생 등으로 거주자의 건강, 위생, 안전을 위협

□ 도배공․목공․방수공 전문팀을 편성하여 원스톱 노후주택 개보수로 신속한 주거환경개선 강화

○ 사회적 배려가 필요한 노인, 어린이, 장애인 가구의 안전한 주거환경을 위하여 주거약자 편의시설 및 주택용 소방시설 설치 확충

□ 노약자 등의 사용이 간편한 다양한 소방시설(소화기, 단독경보형감지기, 간이소화용구, 누전경보차단기 등) 설치 및 대상가구 적극 발굴을 통해 취약계층 인명□재산피해 사전 예방

□ 금후계획

○ 사전 현장실사 및 집수리사업 추진	: ’20. 3. ∼10.

○ 사업완료가구 집수리 상태 점검 및 수혜자 만족도 조사	: ’20. 10.∼12.

주거재생팀

도심빈집정비 주민공간조성 사업

○ 도심지역 내 장기간 방치되어 정주환경을 악화시키는 빈집을 정비

하여 안전하고 쾌적한 도시경관 조성 및 주거환경 개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 12.

○ 사 업 비 : 260백만원(도비78, 시비182)

○ 사업대상 : 1년 이상 거주 또는 사용하지 않은 빈집

- 리모델링 후 5년 이상 주변시세의 반값 전‧월세 임대에 동의한 소유자

- 철거 후 3년 이상 공공용지(주민쉼터, 공용텃밭, 주차장 등)로 사용 동의한 소유자

□ 추진상황

○ 2019년 빈집정비사업 완료 13개소

- 주차장 : 5개소, 텃밭 : 6개소, 반값임대 : 2개소

※ 그간 빈집 정비사업 추진 현황 : ’08년 ~’18년 128동 정비(사업비1,450백만원)

○ 2020년 사업대상지 신청 접수	: ’20.2.3.∼2.28.

□ 문제점 및 대책

○ 철거대상 빈집이 좁은 골목 안쪽에 이웃집과 연접해 있는 경우 인력  철거과정에서 이웃집과 분쟁 발생 등으로 철거기피 또는 증액 요구

□ 철거공사 난이도가 높은 빈집(1~2가구)의 경우 철거업체와 현장을 사전확인 후 공사 별도 발주하여 공사시행

□ 금후계획

○ 사업대상지 선정	: ’20. 3.

- 철거사업 가급적 지양, 반값임대주택사업 중점적 추진

○ 빈집정비 사업추진	: ’20. 4.∼

○ 빈집정비사업 완료대상지 협약이행사항 점검 등 사후관리	: ’20. 4.∼

주거재생팀

빈집 플랫폼 운영

○ 구도심 저층주거지 빈집의 지속적인 증가로 인하여 미관을 저해하고

악취·해충 등으로 열악해져 가는 주거환경에 대응하기 위하여 빈집을      필요로 하는 수요자에게 빈집 정보 및 연계 서비스를 제공

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 12.

○ 사 업 비 : 30백만원

○ 사업규모 : 소유자가 빈집 플랫폼 게재에 동의한 빈집

○ 사업내용 : 빈집 활용 수요자에게 빈집 정보 및 연계 서비스 제공

□ 추진사항

○ 빈집실태조사 및 정비계획 수립 용역 추진    : ’19. 3.∼’20. 3.

○ 빈집 플랫폼 구축을 위한 관련기관 회의      : ’20. 1.

- 빈집 플랫폼 구축 이후 운영 방안 논의(LH, LX, 도시재생지원센터)

	《 빈집 플랫폼 구축“안” 》
▪ 등재 가능 빈집 호수 : 100호 정도 (정보공개 동의 가구) ▪ 개설 방법 : 시 홈페이지에 빈집 현황 창구 개설 - 빈집의 위치·면적·구조·발생시기·현황사진·소유자 의견 등 기타 주택 이용에 필요한 정보 제공 ▪ 운영 방안 : 매년 연초에 빈집 변동 현황을 파악하여 자료 업데이트(’19. 1. ~ 12. 신규 발생 빈집)

□ 쟁점사항 및 대책

○ 매매·전월세 체결에 따른 지원, 건축물 보수 및 활용 방안 등 빈집 이용을 위한 수요자의 세부적인 요구사항 대응에 어려움

□ 전국 최초로 운영되는 사업으로 시범운영 기간에 문제점을 파악하여 이에 상응하는 대안 마련

□ 금후계획

○ 빈집플랫폼 등재 가능 주택 동의서 확보 및 추가자료 조사	: ’20. 2.∼3.

○ 빈집플랫폼 구축 및 시범 운영	: ’20. 4.∼

○ 신규 발생한 빈집 실태조사 후 빈집플랫폼 추가 등재	: ’20. 7.∼

주거재생팀

부도임대아파트 수선비 지원

○ 공공주택 특별법에 의거 LH공사가 매입한 효성 부도임대주택에 대하여      수선비를 지원함으로써 임차인 보호 및 서민주거 안정에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016. ∼ 2020.(5개년)

○ 사업규모 : 효성 부도임대주택 3개 단지 248호(LH국민임대주택으로 전환)

○ 사 업 비 : 600백만원

○ 사업내용 : LH공사가 매입한 효성 부도임대주택 3개 단지에 대해 5년간 주택수선비 총 30억원 지원

□ 추진상황

○ 2019년도 주택수선비 집행 및 정산 (3개단지  6.14억원)

- 승강기 교체·보수 및 세대 유지보수 등

※ 그간 추진사항 (’16년∼’18년) : 3개단지 22.8억원

연차	연도	수 선 비(억원)			주 요 공 사
		합 계	전주시	LH
1	16년	7.46	6	1.46	세대 최초 개‧보수 공사, 화재 수신기 교체 등
2	17년	9.27	6	3.27	세대 일상보수, 옥상방수 공사 등
3	18년	6.15	6	0.15	세대 일상보수, 급수방식 변경공사 등

□ 금후계획

○ 3개 단지 주택수선비 지원(시↔LH공사)	: ’20. 2.

○ 입주민 의견 수렴	: ’20. 3.

- 입주민 불편 사항 의견 수렴하여 수선 사업에 반영

○ 3개 단지 주택수선비 집행(LH공사)	: ’20. 3.∼11.

- 전용부 세대 일상보수, 공용부 승강기 교체 및 놀이터 개선 공사 등

○ ’20년도분 주택수선비 정산	: ’20. 12.

주거재생팀

저소득계층 임대보증금 지원

○ 무주택 저소득계층이 장기임대주택 또는 기존주택 매입임대주택에 입주할      수 있도록 임대보증금을 지원하여 주거비 부담 완화 및 주거 안정 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 12.(사업비 소진 시까지)

○ 사 업 비 : 666백만원(도 266, 시 400)  ※ 도비 직접 지원

○ 사업내용 : 생계 또는 의료급여수급자가 LH, 전북개발공사에서 공급하는 장기임대주택(영구․국민임대) 또는 기존주택 매입임대주택에 입주 시 임대보증금 무이자 지원ᅟᅡᆫ

○ 지원금액 : 가구당 10백만원 이내(계약금 본인 부담)

○ 지원기간 : 1회 2년(2회 연장 / 최대6년)

□ 추진상황

○ 2019년 임대보증금 지원 현황

(단위: 백만원, 가구)

구분	계	영구임대	국민임대	매입임대
지원금액	666	147	345	174
지원가구	172	88	37	47

※ 그간 지원실적(’11 ~ ’18) : 1,054가구 4,744백만원(도비 1,895, 시비 2,849)

○ 2020년 임대보증금 지원 사업 공고	: ’20. 1.

○ 2020년 임대보증금 지원 실적(12가구, 42백만원)

□ 금후계획

○ 임대보증금 지원 사업 신청 접수 및 지원

○ 공공임대주택 신청(LH)시 임대보증금 지원사업 연계 홍보

○ 임대보증금 지원기간 만료자 보증금 회수 및 대상자 관리

주거재생팀

저층주거지 골목길 정비사업 추진

○ 저층주거지 노후주택 밀집 지역의 골목길 정비와 생활 SOC사업을      연계 추진하여 주민이 실질적으로 체감할 수 있는 주거환경을 개선      하고 주변지역 활성화를 통한 주거 재생 모델 구현

□ 사업개요

○ 사업대상 : 저층주거지 내 골목길 및 인접 노후주택

○ 사업내용 : 도로·우수관 정비, 담장철거, 야간조명 개선 등

○ 사 업 비 : 800백만원 (2개소)

○ 사업대상지 선정

- 주변지역 연계 확장 및 개선 등 사업효과가 크고, 주민참여가 높은 지역

□ 추진상황

○ 사업대상지 21개소 신청․접수(완산18, 덕진3)	: ’19. 10.∼11.

○ 신청․접수 대상지 현장조사	: ’19. 12.

○ 시범 사업지 선정위원회 개최(2개소 선정)	: ’19. 12.

- 완산구 강당1길 일원(서완산동), 덕진구 신복5,6,7길 일원(팔복동)

≪ 골목길 정비방향 ≫
공공시설	▪ 공공장소를 만들 수 있는 공간 및 모임쉼터 확보 예)담장 후퇴, 짜투리 땅 매입 ▪ 조경 및 벽면 디자인을 활용한 골목길 환경 개선 예)경관조명등 설치 ▪ 빗물고임 방지를 위한 바닥배수 및 선홈통 정비 ▪ 밝고 안전한 골목길 조성을 위한 CCTV 설치
사유시설	▪ 골목길 경관을 위한 외벽 및 창호 정비(에너지효율개선 사업으로 선정 사업비 일부 지원) - 주민 참여를 이끌어내고 골목길 사업의 효과 증대시키기 위함

□ 금후계획

○ 사업 대상지 주민의견 수렴	: ’20. 2.∼3.

- 주민참여 여부 및 사업방향 결정을 위한 의견 수렴

○ 설계용역·사업체 선정 등 행정절차 이행	: ’20. 4.∼5.

○ 골목길 정비사업 추진	: ’20. 6.∼9.

- 주택 개선을 위한 집수리 및 에너지효율화 사업 병행

○ 골목길 공동체 활성화를 위한 주민협의체 구성·운영	: ’20. 6.∼

해피하우스팀

해피하우스 사업 내실화

○ 해피하우스 사업의 내실화로 주거취약계층 주민의 삶의 질 향상과

공동체 복원을 통한 건강한 주거환경 조성으로 주거복지 실현

및 마을공동체 활성화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 12.

○ 사 업 비 : 351백만원

○ 사업규모 : 시 전지역 35개동(단독주택, 다세대 연립주택)

○ 사업내용

- 단독·다세대·연립주택 서비스(창문 부속품 및 배선기구 등 28개 품목 수리지원)

- 혹한기 및 혹서기 취약계층을 위한 특별서비스 실시(뽁뽁이, 쿨매트 등)

- 해충방제, 살균소독, 변기청결 등 위생서비스 실시

- 마을개선 희망사업(재료지원), 주택리폼교육, 건축상담, 공구대여 등

○ 지원대상 : 기초생활수급자, 차상위자, 고령자, 장애인, 중위소득 60%이하 가구

□ 추진상황

○ 단독주택 등 점검․보수 서비스 실적(’19년) : 3,375세대 16,998건

서비스구분	건축설비	전기설비	클린(위생)	기타(설치지원 및 상담 등)
건 수	3,099	6,806	2,807	4,286

○ 동절기 방한 서비스(뽁뽁이 설치, 동파 수도꼭지 교체 등) : 13건

□ 금후계획

○ 재료구입 및 서비스 실시	: 연중

○ 마을개선 희망사업, 주택리폼교육 실시	: 연중

○ 해피하우스 사업 상시 홍보 추진	: 연중

○ 수혜자 사업만족도 조사 등 모니터링         : ’20. 12.

신도시사업과  소 관

□	전주대대 이전사업	----	51
□	천마지구 도시개발사업	----	52
□	에코시티 조성사업	----	53
□	에코시티 지구외 연계도로(4개소) 개설추진	----	54
□	전주교도소 이전사업	----	55
□	효천지구 삼천횡단교량 설치사업	----	56
□	효천지구 연계도로 확장공사	----	57

부대이전팀

전주대대 이전사업

○ 북부권 도시개발에 따른 전주대대를 이전함으로써 군부대 사격소음 및

안전사고를 사전 예방하고 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. ∼ 2023.(6개년)

○ 사업위치 : 덕진구 도도동 일원

○ 사업규모 : 314천㎡(9.5만평) 정도

※ 송천동 현부지 : 322,575㎡(9.7만평)[자연녹지 5.5만평, 덕진공원 4.2만평]

○ 사 업 비 : 723억원 정도

○ 추진방식 : 기부 대 양여사업

○ 사업시행 : 전주시장(전주시 & ㈜에코시티)

□ 추진상황

○ 전주대대 일원(송천동, 호성동) 사격소음 및 유탄피해 민원 발생, 부대이전 요구   :   ∼’09.

○ 전주대대 이전 건의(전주시→국방부)                    : ’09.  4.

○ 전주대대 이전 대상지 협의(전주시→국방부)           : ’14. 12.∼’18.  7.

○ 작전성 검토결과 통보(국방부→전주시, 도도동 동의)                : ’18.  7.

○ 시의회 제2차 정례회 본회의 의결                      : ’18. 10.

○ 합의각서 체결(국방시설본부&전주시)                   : ’18. 12.

○ 기본계획 심의(국방부)                                  : ’19.  8.

○ 전략환경영향평가준비서 심의                           : ’20.  1.

- 조건부 승인 : 인근 군부대(항공대대) 포함 소음영향권지역 확대(1.0㎞→3.0㎞)

□ 문제점 및 대책

○ 비대위에서 항공대대 이전 관련 지역발전방안 협의 완료시까지 전주대대  이전사업 행정절차 및 사업추진 중지 요구

□ 전주시 제2공공청사(맑은물사업본부, 농업기술센터 등) 이전 등 지역발전방안 협의 후 전주대대 이전사업 정상 추진

□ 금후계획

○ 사업계획 및 실시계획 승인 등 행정절차 이행	: ’20.∼’21.

○ 공사 착공 및 준공	: ’21.∼’23.

○ 전주대대 기부 및 양여재산 정산	: ’23년 말

에코시티팀

천마지구 도시개발사업

○ 35사단 부지개발로 인한 주변지역의 도시화 및 군부대시설 노후화

○ 도시 균형발전과 난개발을 방지하고 체계적인 북부권 도시개발

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015. ∼ 2026.(12개년)

○ 사업위치 : 덕진구 전주대대 주변 송천동․호성동 일원

○ 사업규모 : 도시개발구역 471천㎡

- 일반토지 291천㎡, 전주대대 180천㎡

※ 2019년 용역비 : 500백만원(구역지정, 전략환경영향평가)

○ 사업방식 : 혼용방식(수용 및 환지방식)

○ 개발방법 : 단계별 개발

○ 사업시행 : 전주시장(전주시 & ㈜에코시티)

□ 추진상황

○ 개발행위허가 제한지역 지정고시                 : ’15.  7.
- 제한기간 : ’15. 7. 17.∼’18. 7. 16.(제한기간 3년)

○ 개발행위허가 제한 변경(기간연장) 결정고시       : ’18.  7.
- 제한기간(연장) : ’15. 7. 17.∼’20. 7. 16.(제한기간 5년)

○ 전주시 용역과제심사위원회 심의                 : ’18. 10.

○ 구역지정 및 전략환경영향평가 용역 착수         : ’19.  6.

○ 2019년 제4차 전주시 생태도시위원회 보고        : ’19.  9.

○ 개발계획(안) 수립 및 타당성 조사               : ’19. 10.∼12.

□ 금후계획

○ 도시개발사업 구역지정 행정절차 이행           : ’20.  1.∼ 7.

- 도시건설위원회 사전협의, 주민의견 청취 및 협의, 도시계획위원회 심의 등

○ 도시개발사업 구역 지정․고시                     : ’20.  7.

○ 도시개발사업 개발계획 수립 및 실시계획 인가 추진   : ’21.∼’23.

○ 토지보상 추진                                  : ’23.∼’24.

○ 도시개발사업 착공 및 준공                      : ’25.∼’26.

에코시티팀

에코시티 2단계 조성사업

○ 지역 균형발전 및 광역도시기반 구축을 위하여 도심지에 존재하는

군부대를 이전하고 북부권개발을 선도할 친환경 생태도시 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2006. ∼ 2021.(1단계 ’17. 6. / 2단계 ’21. 6.)

○ 사업위치 : 덕진구 호성동․송천동․전미동 일원

○ 사업규모 : 1,988천㎡(계획인구 32,903명/13,161세대)

- 1단계 : 1,545천㎡, 2단계 : 442천㎡

○ 사 업 비 : 3,684억원(민자), 1단계 2,723억원 / 2단계 961억원

○ 사업방식 : 혼용방식(수용․사용 및 환지방식)

○ 추진방식 : 기부 대 양여방식

○ 사업시행 : 전주시장(전주시 & ㈜에코시티)

□ 추진상황

○ 민간사업자 협약체결(전주시↔에코시티)         : ’06. 3.

○ 도시개발구역지정(개발계획 포함) 승인․고시	: ’12. 8.

○ 개발계획(변경) 및 실시계획수립 고시	: ’14. 2.

○ 공사 착공 및 준공(1단계)	: ’14. 9. ∼ ’17.   6.

○ 토지매각 절차(계획수립, 승인, 매각공고, 입찰)추진	: ’15. 6.

- 159필지 매각(공동주택14, 단독주택82, 준주거33, 상업22, 주상2, 업무4, 체육1, 유치원1)

○ 환지확정처분 공고	: ’17. 6.

○ 206·506항공대대 이전(송천동→도도동)	: ’19. 1.

○ 2단계 문화재 발굴조사 및 토양오염 정화사업 시행	: ’19. 3. ∼ ’19. 12.

○ 2단계 개발계획 및 실시계획 변경 인가․고시	: ’20. 1.

□ 금후계획

○ 2단계 실시설계 완료	: ’20. 3.

○ 2단계 공사 착공 및 준공	: ’20. 4. ∼ ’21. 12.

에코시티팀

에코시티 지구 외 연계도로(4개소) 개설추진

○ 전주00부대 이전부지 도시개발사업에 따른 도심 교통혼잡을 해소하기        위한 접근도로망 시설 확충으로 지역발전 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017. ∼ 2020.(4개년)

○ 사업위치 : 덕진구 호성동․송천동․전미동 일원

○ 사업규모 : L=2.69㎞, B=15~25m

- 중로1-54, 대로3-22, 대로3-30, 중로2-138

○ 사 업 비 : 339억원(시비+민자)

- 중로 1-54호 외 2개 노선 301억(민자) : 공사비 129억, 보상비 172억

- 중로 2-138호 1개 노선 38억(민자+시비) : 공사비(민자)20억, 보상비(시비)18억

○ 사업시행 : 전주시장(전주시 & ㈜에코시티)

□ 추진상황

【미산초～용흥마을(대로 3-22), 발단사거리～용흥마을(대로 3-30), 초포초～고당네거리(중로1-54) : 3개노선 】

○ 연계교통체계 구축대책 국가교통정책 조정실무 위원회 심의통과  : ’12. 6.

○ 전북 교통영향분석·개선대책심의위원회 심의    : ’14. 2.

○ 도시관리계획 결정(변경) 및 실시계획 인가(고시)     : ’17. 4.

○ 보상계획 공고 및 보상협의 완료	: ’17. 7. ∼ ’19. 9.

○ 공사 착공	: ’18. 1.

【호성동 충만교회～초포로 대성식당 1개노선】

○ 도시관리계획 시설 결정 및 지형도면 승인 고시      : ’18. 6.

○ 보상계획 공고 및 보상협의 완료                         : ’18. 9.  ∼ ’19. 9.

○ 실시계획인가 고시                             : ’18. 11.

○ 공사 착공	: ’19. 8.

※ 공정율 : 대로3-22(100%), 대로3-30(97%), 중로1-54(100%), 중로2-138(70%)

□ 금후계획

○ 공사 준공                                    : ’20. 3.

- 초포초∼고당네거리, 미산초∼용흥마을, 발단사거리∼용흥마을  3개노선

- 호성동 충만교회∼초포로 대성식당 1개노선

택지개발팀

전주교도소 이전․신축사업

○ 교도소 인근지역 주민들의 주거환경 개선과 서남권의 체계적인 도시정비 필요

○ 재소자 사생활 보호와 교정직원의 근무환경 개선을 위한 시설개선 시급

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015. ∼ 2023.(9개년)

○ 사업위치 : 완산구 평화동3가 작지마을 일원(현 교도소에서 300m set-back)

○ 사업규모 : 194천㎡(교정시설 188천㎡, 진입도로 6천㎡)

- 수용인원 1,500명, 건축면적 30,181㎡(26개동), 직원 465명

○ 사 업 비 : 1,500억원 정도(국비), ※시비투입 50억원(특별지원35, 구이로확장15)

○ 사업시행 : 법무부

□ 추진상황

○ 작지마을 부근 교도소 이전부지 선정(법무부)	: ’15. 3. 20.

○ 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시	: ’17. 12. 22.

○ 기본 및 실시설계용역 착수(법무부)	: ’18. 8. 1.

- 민원 등 주민협의 지연으로 기본설계 용역 일시정지(’19. 3. 5.)

○ 작지마을 주민 권익위에‘이주대책 특별지원 요구’민원 제출	: ’19. 1. 30.

○ 권익위 고충민원 조정(안) 통보(권익위→시)	: ’19. 10. 30.

○ 보상업무 위․수탁협약 체결(법무부, 시)	: ’19. 12. 6.

○ 작지마을 고충민원 처리결과 통보(권익위→시)	: ’19. 12. 24.

- 특별지원은 전주시가 내부기준을 마련 자체 검토 추진

○ 이주대책 추진계획 수립	: ’20. 1. 23.

- 권익위 조정(안)과 그간 주민협의 사항을 반영하여 이주대책 추진

☞ 이주택지 원가의 15% 공급, 공동작업장 200평씩 대부, 공동수익사업 시에서 출연

□ 금후계획

○ 이주단지 등 조성 용역(전주시)                    : ’20. 2.∼’20. 11.

- 대지조성사업계획 승인(’20. 2.∼8.), 기본 및 실시설계(’20. 5.∼11.)

○ 이주단지 보상 및 조성공사 추진(전주시)	: ’20. 12.∼’21.  08.

○ 용역 재착수, 사업인가(법무부)                 : ’21. 1.∼’21.  12.    ○ 이전부지 토지보상 추진(전주시)	: ’21. 6.∼’21. 12.

○ 공사추진(법무부)	: ’22. 1.∼’23. 12.

택지개발팀

효천지구 삼천 횡단교량 설치사업

○ 효천지구 준공 후 예상되는 교통량 증가에 대비한 접근도로망 확충  및 인근 생활권과의 연계 교통체계 구축으로 원활한 교통흐름 유도

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2021. 4.

○ 사업위치 : 완산구 효천지구 ~ 용리로(삼천동2가 호돌이감자탕 앞)

○ 사업규모 : 교량(L=124.5m, B=36.5m) 설치

- 차도(왕복6차선, 21.5m), 보도(남측 5.0~9.5m, 북측 5.5m)

○ 사 업 비 : 154억(효천 도시개발사업 추가사업)

○ 사업시행 : 한국토지주택공사

□ 추진상황

○ 효천지구 삼천 연결교량 설치 협의(LH)          : ’15. 7.  ∼ ’17. 10.

- 협의내용 : 효천지구 추가 사업으로 시행 결정, LH에서 직접 시행

○ 효천지구 토지평가협의회 개최(21차, 23차)      : ’16. 10. / ’18. 4.

- 교량 폭 40m, 인도가 넓은 광장형의 광폭으로 설치

○ 기본 및 실시설계 용역 추진(LH)                : ’18. 3.  ∼ ’19. 9.

○ 전주시 경관위원회 심의(9차, 12차)              : ’18. 9. / ’18. 11.

○ 공법심의, 기술심의(LH 자체시행)                : ’19. 4. ∼ 9.

○ 도시관리계획(도로) 결정(변경) 및 지형도면 고시         : ’19. 9.

○ 총괄조경과 자문의견 실시설계 반영 완료        : ’19. 11. 22.

○ 시공업체 선정(입찰)                           : ’20. 1.

□ 금후계획

○ 공사착공                                     : ’20. 2.

- 기초공사 및 교각설치(’20. 6.)

- 거더가설 및 상판슬라브 타설(’20. 10.)

- 조경 및 전기공사(’21. 2.)

○ 공사준공                                     : ’21. 4.

택지개발팀

효천지구 연계도로 확장공사

○ 효천지구 단지개발 후 천잠로·세내로와 인접국도(21호선)의 연계 교통체계 구축으로 교통정체 해소하고 주변의 원활한 교통흐름 유도

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017. 3. ∼ 2024. 12.

○ 사업위치 : 완산구 삼천동 세내교∼중인동 중인나들목(국도 21호선)

○ 사업규모 : 도로확장 L=3.4km, B=20~25m

- 1단계 : 해성삼거리 ~ 중인나들목(L=1.9km, B=20~25m)

- 2단계 : 세내교 ~ 삼천교 ~ 해성삼거리(L=1.5km, B=25m)

○ 사 업 비 : 338억원 [공사비 178(1단계 106, 2단계 72), 보상비 150, 기타 10

※ 효천지구 개발이익금을 재원으로 추진

□ 추진상황

○ 지방재정 투융자사업 심사‧의결(원안 의결)       : ’16. 10. 27.

○ 기본 및 실시설계 등 용역 추진              : ’17. 3. ∼’18. 11.

○ 도시관리계획(도로 등) 결정(변경)            : ’18. 4. 30.

○ 실시계획 인가 고시                         : ’19. 3. 15.

○ 보상계획 공고                              : ’19.  3. 27.

○ 편입토지 및 지장물 보상 추진                : ’19.  6. ∼

- 전체 190필지 150억원 (94필지 90억원 보상완료 / 협의율 60%)

○ 단계별 도로확장 계획 수립                  : ’19. 12. 27.

□ 쟁점사항 및 대책

○ 감정평가 결과 효천지구 개발로 사업비 증가 되어 단계별 개발 불가피

: 사업비 202억 ⇨ 392억, 증 190억원

□ 자체 감리, 식재 및 가로등 축소 조정 등 사업비 절감(392→338억원)

□ 전구간 보상완료 후 시급 구간 1단계(해성삼거리~중인나들목) 먼저 공사 추진하고  재원확보 및 교통상황에 따라 잔여 구간 연차적 시행

□ 금후계획

○ 편입 토지 및 지장물 보상협의 추진           : ’20.  1. ∼12.

○ 1단계 공사착공                             : ’20.  3.

○ 1단계 공사준공                             : ’21. 12.

○ 2단계 공사추진                             : ’22년∼

걷고싶은도시과 소관

□	장기미집행 도시계획도로 보상	----	59
□	북부권 국도대체 우회도로(용진~우아) 건설	----	60
□	쑥고개로(국립박물관~호동마을) 조성사업	----	61
□	견훤로 교통체계(TSM) 개선사업	----	62
□	동부대로(전미교~전주천교 확장공사)	----	63
□	전라감영옛길 보행환경 개선사업	----	64
□	금암교차로 개선 및 분수정원 조성사업	----	65
□	객사길 보행환경 개선사업	----	66
□	구도심 문화거리 조성사업	----	67
	불합리한 도로 구조개선사업	----	68
	주요 지방하천 정비사업	----	69
	전주시 걷고싶은길 통합관리	----	70

도로시설팀

장기미집행 도시계획도로 보상

○ 2020. 7월 도시계획도로의 실효(일몰제)에 따라 전반적인 도로관리 체계에

문제점 발생, 효율적인 관리방안으로 인가대상을 선정하여 우선 토지      매입하는 등 일몰제에 대비하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. ∼ 2025.(5개년)

○ 사 업 비 : 470억원 (’20년 예산확보 : 40억)

○ 사업내용 : 장기미집행 도시계획도로 대로 7개소, 중로 13개소

- 완주로, 전진로, 혁신로, 동부대로, 솔내로, 여산로 등

□ 추진상황

○ 장기미집행 도시계획도로 관리계획 변경(안)수립       : ’19.  8.

○ 장기미집행 도시계획도로 실시설계용역 착수(전체,1차) : ’19.  8.

- 용역비 : (전체분) 434,720천원, (1차) 52,252천원

○ 토지보상에 따른 계획 수립(우선순위 검토)            : ’20.  1.

○ 우선순위 노선 분할 측량(과학로)                     : ’20. 1.∼2.

□ 쟁점 및 대책

○ 장기미집행도로 인가대상 20개 노선 보상에 따른 연간 소요액 94억원  으로 ’20년 예산 54억원 추가 필요

□ 1회 추경 예산 54억원 보상비 확보

□ 금후계획

○ 보상 대상토지 감정평가 및 보상 착수                : ’20.  4.

○ 실시계획인가 고시                                  : ’20.  6.

○ 용역 준공                                          : ’20.  8.

도로시설팀

북부권 국도대체 우회도로(용진~우아)건설

○ 북부권 국도대체우회도로(용정~용진) 1단계 사업과 연결 사업으로
북부권 우회 교통망 완성⇒교통량 분산으로 시내권 교통 소통 촉진

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2013. ∼ 2026.(14개년)

○ 위    치 : 완주군 용진읍∼덕진구전진로∼완산구 색장동 (국도21호선)

○ 사업규모 : 연장 9.9㎞ (전주시 6.7㎞), 폭 12.5m (4차로 전제 2차로)

- 전주시 6.7㎞ (1공구 1.6㎞, 2공구 5.1㎞)

○ 총사업비 : 2,362억원[국비 2,062, 시비 300 (1공구 176, 2공구 124)]

○ 시행기관 : 국토교통부(익산지방국토관리청)

□ 추진상황

○ 1공구(용진읍-전진로) 공사착공(공정율 56%)           : ’16.  9.

○ 1공구 용지매입 (보상율 75%)                        : ’18. 10.

※ 2020년 현재까지 185억원으로 총 162필지 92,179㎡ 중 121필지 61,038㎡ 매입

○ 2공구(전진로∼색장동) 공사 착공(공정율 0.03%)       : ’19.  7.

□ 쟁점사항 및 대책

○ 국대도 4차로 전제 2차로 건설 중으로 4차선 확장에 따른 총사업비 변경

□ 총사업비 심의 결과 기재부에서 KDI에 사업계획 적정성 재검토 요청

- KDI 사업계획 적정성 재검토 결과에 따라 총사업비 조정 재요청 (910억원 증액)

□ 금후계획

○ '20년 토지보상 (79필지/62,998㎡, 40억원)              : ’20.  3.

- 1공구 : 27필지, 15,984㎡ / 2공구 : 52필지, 47,014㎡)

○ 전체구간 공사완료	: ’26.  5.

도로시설팀

쑥고개로(국립박물관~호동마을)조성사업

○ 국도21호선 나들목과 국립박물관 간 연결도로로 혁신도시, 효천지구,
개발 등으로 심각한 교통체증이 발생되어 도로확장 필요

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. ∼ 2022.(5개년)

○ 위    치 : 완산구 효자동2가 국립박물관∼호동마을 입구

○ 사업규모 : 연장 1.18km, 폭 15~18m → 35m

○ 총사업비 : 9,800백만원 (공사비 8,300, 보상비 1,500)

- 예산확보 : 2,350백만원 (’19년 350, ’20년 2,000)

□ 추진상황

○ 지방재정투자심사 완료	: ’18.  2.

○ 국립박물관∼호동마을 실시설계용역 착수	: ’18. 10.

○ 행정절차(경관심의, 교통성, 환경성 실시계획인가 등) 추진	: ’19. 3.∼12.

○ 주민설명회 개최	: ’19. 10.

○ 실시계획인가 신청                           : ’20.  1.

□ 쟁점사항 및 대책

○ 사업비 부족으로 공사기간 장기소요 예상

□ 1회 추경에 사업비 확보 및 공사 추진

□ 금후계획

○ 분할측량 및 협의보상 등                     : ’20.  2.∼3.

○ 행정절차 이행 및 실시계획인가 완료          : ’20.  4.

○ 예산 확보 및 공사추진                       : ’20.  8.

도로시설팀

견훤로 교통체계개선(TSM) 사업

○ 견훤로(명주골네거리∼호성네거리)는 출퇴근시간대 상습적인 교통정체가
발생하고 있어 차로수 증설 및 최적 신호운영방안을 수립하여 교통
흐름 개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. ∼ 2020.(3개년)

○ 위    치 : 덕진구 견훤로 일원(명주골네거리∼호성네거리)

○ 사업규모 : 연장 1.23㎞, (보도폭 축소 4.0∼7.0 → 4.0m)

- 보도축소, 차로증설(2개 차로), 신호운영체계 재수립

○ 총사업비 : 3,950백만원(시비 3,950)

□ 추진상황

○ 기본 및 실시설계용역 착수	: ’18.  5.

○ 개선방안 및 관련부서 사전협의	: ’18. 10.

○ 행정절차 완료                              : ’19. 4.∼11.

- 경관심의, 총괄조경가 자문, 설계자문, 투자심사, 일상감사 및 계약심사 등

○ 공사 착공                                  : ’19. 12

○ 동절기 공사 중지                           : ’19. 12

○ 현장 조사 및 작업계획 수립                 : ’20.  1.

○ 협의 보상 등                               : ’20.  2.∼

□ 금후계획

○ 수목 이식                                  : ’20. 2.∼3.

○ 공사 추진                                  : ’20. 3.∼12.

도로시설팀

동부대로(전미교~전주천교) 확장공사

○ 에코시티 등 급속한 주변개발로 동부대로를 이용하는 차량과 보행자가
증가함에 따라 도로확장 및 인도 개설을 통해 쾌적한 교통환경 제공

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. ∼ 2020.(2개년)

○ 위    치 : 덕진구 송천동2가 664-49 일원(전미교∼전주천교)

○ 사업규모 : 도시계획도로(대로1-11호선) 확장 L=0.21km(B=20⇒30m)

- 차로 증설(편측 2개차로), 보도 개설, 제방도로 확장 등

○ 총사업비 : 2,800백만원(도비 300, 시비 2,500)

□ 추진상황

○ 중기지방재정계획 반영                        : ’18.  9.

○ 자체투자심사 반영                            : ’19.  6

○ 실시설계용역 착수                            : ’19.  8.

○ 사업부지 경계 및 분할 측량                   : ’19.  9.

○ 편입토지 보상 완료                           : ’19. 10.

○ 행정절차 이행 및 실시설계용역 완료             : ’19.  9.∼11.

- 경관심의, 일상감사 및 계약심사 등

○ 공사 착수                                    : ’19. 12.

○ 현장 조사 및 작업계획 수립                   : ’20.  1.

□ 금후계획

○ 협의 보상 등                                 : ’20.  3.

○ 공사 추진                                    : ’20.  2.∼12.

도로정비팀

전라감영옛길 보행환경 개선사업

○ 한옥마을, 남부시장과 인접한 문화 및 상업의 중심 지역으로 보행자가
안전하고 편하게 걸을 수 있는 쾌적한 보행환경 개선을 통해
지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. ∼ 2020.(3개년)

○ 위    치 : 완산구 중앙동, 풍남동 일원(풍남문 일원)

○ 사업내용 : 보행동선 확보, 교통정온화, 불법주정차 방지 등

○ 총사업비 : 1,400백만원(국비 600, 시비 800)

□ 추진상황

○ 기본 및 실시설계용역 착수	: ’18. 5.

○ 안전한 보행환경 개선사업 자문회의(행안부)	: ’18. 7.

○ 시장 상인회 간담회(3회)	: ’18. 9. 21./10. 19./11. 19.

○ 주민설명회(3회)	: ’19. 2. 8./ 2. 25./ 4. 16.

○ 풍남문4길 상인 면담	: ’19. 3. 6.∼3. 8.

○ 풍남문4길 상인 일방통행 반대의견 제출	: ’19. 5.

○ 사업계획 변경(안) 행정안전부 협의	: ’19. 7.∼10.

○ 사업계획 변경(안) 행정안전부 승인	: ’19. 11.

○ 공사 착수(동절기 일시정지 ’20.1.2)	: ’19. 12.

□ 문제점 및 대책

○ 사업구역이 하수도 정비사업(중앙8분구) 구역내 포함되어 병행추진

되어야 하나 사업시기 상이함[하수도공사 '20년도 하반기 착공예정]

□ 하수관로정비 중복구간 본 사업에 포함하여 추진(하수과 관급자재 구입 지원)

□ 금후계획

○ 공사 추진	: ’20.  3.∼12.

도로정비팀

금암교차로 개선 및 분수정원 조성사업

○ 기형적인 5갈래 교차로를 4갈래 교차로로 개선하여 상습정체 및
교통사고 위험 해소하고, 인간과 자연이 공존하는 아름다운‘천만그루
정원도시’조성으로 전주 이미지 개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017. ∼ 2020.(4개년)

○ 위    치 : 덕진구 금암교차로 일원(태평양수영장 일원)

○ 사업내용 : 교통섬 정비 1식, 분수광장 복원 1식 등

○ 총사업비 : 3,100백만원(국비 500, 시비 2,600)

- 교차로 개선(23억) : 샘터(D5m) 1식, 교목 식재(90주), 바닥디자인포장 1식 등

- 분수광장 복원(8억) : 분수대((D15m), 교목 식재(54주), 목재의자 1식 등

□ 추진상황

○ 금암광장 교차로 교통체계 변경 운영	: ’18. 12.

- 차량 정체현상 감소 및 진북광장 등 직·간접적 개선효과 발생

○ 금암광장 교차로 합동점검(전북경찰청, 경찰서)	: ’19.  3.

- 교차로 사고예방 및 보행동선을 고려 교통섬 위치 조정 검토 요구

○ 교통섬 개선안 주민설명회(4회) 및 사업계획 변경	: ’19.  5.

- 교통섬 및 횡단보도 위치 조정, 교통섬과 연계한 분수대 복원

○ 경관심의 및 도시림심의 개최	: ’19.  8.

○ 금암광장 교차로 교통체계 최종 변경	: ’19. 11.

○ 금암 분수정원 조성공사 착수                      : ’20.  2.

□ 금후계획

○ 분수대 설치 및 시범운영                         : ’20.  5.

○ 금암 분수정원 조성사업 완료                     : ’20.  6.

도로정비팀

객사길 보행환경 개선사업

○ 객사길은 한옥마을과 인접하여 지속적으로 관광객이 증가되고 있는
지역으로 보행자가 안전하고 편하게 걸을 수 있는 쾌적한 보행환경
개선을 통해 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. ∼ 2020.(2개년)

○ 위    치 : 완산구 고사동 옥토주차장 일원(전주객사1길∼3길)

○ 사업내용 : 보행환경 개선 L=1.7km(5개 노선)

○ 총사업비 : 2,000백만원(국 1,000, 시비 1,000)

- 예산확보 : 1,014백만원(국 1,000, 시 14)

□ 추진상황

○ 객사길 5개노선 일방통행 및 보행공간 확보	: ’18. 11.

○ 기본 및 실시설계용역 착수	: ’19.  3.

○ 불법주정차 CCTV 8대 설치	: ’19.  3.

○ 지역예술가 및 총괄조경가 현장 자문	: ’19.  4.

○ 주민설명회 개최	: ’19.  5.

○ 경관계획(안) 간담회	: ’19. 10.

○ 경관심의	: ’19. 11.

○ 객사길 보행환경 개선사업‘민관협의체’구성	: ’19. 11.

○ 민관협의체 운영	: ’20.  2.

□ 금후계획

○ 공사 추진	: ’20.  3.∼12.

도로정비팀

구도심(충경로) 문화거리 조성사업

○ 구도심 공동화와 통과교통 위주의 충경로를 다양한 문화가 있고 보행
친화적인 문화거리로 조성하여 한옥마을의 외연을 확장하고 전통문화
중심의 도시재생 활성화로 도시경쟁력 제고

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. ∼ 2022.(5개년)

○ 위    치 : 완산구 충경로(병무청오거리∼다가교, L=1.3km)

○ 사업내용 : 문화거리 조성 1식(도로다이어트, 인도정비, 가로수 정비 등)

○ 총사업비 : 10,000백만원(국 800, 시 9,200)

- 예산확보액 : 1,900백만원(국 800, 시 1,100)

□ 추진상황

○ 기본구상 및 타당성검토용역 착수(학술용역)	: ’18. 11.

○ 설명회 개최(대상: 충경로 차없는사람의거리 다울마당)	: ’19.  5.

○ 기본구상(안) 관련기관 자문	: ’19.  9.

- 왕복 4차로 유지, 차로폭 조정 적정[경찰서, 도로교통공단 등]

○ 기본구상(안) 주민설명회                          : ’19. 12.

○ 기본 및 실시설계용역 착수                        : ’20.  1.

○ 현황측량 및 지장물 조사                          : ’20.  1.

□ 문제점 및 대책

○ 세부 사업계획(포장자재 등) 검토

□ 설계완료 후(’20년 상반기 예정) 추경예산 확보하여 사업 추진

□ 금후계획

○ 가로공간 최적대안 수립 및 행정절차 이행         : ’20.  2.∼4.

○ 기본 및 실시설계 완료	: ’20.  5.

○ 단계별 공사 추진	: ’20.  6.∼

도로정비팀

불합리한 도로 구조개선사업

○ 교차로가 밀집되어 있는 이동교 일원 위험도로를 구조개선하고,

교통사고 다발지역에 도로구조 개선 및 도로안전시설물 정비를 통해 안전한 도로환경 조성

□ 사업개요

구 분	이동교 일원 위험도로 구조개선	교통사고 잦은 곳 개선
사업기간	2020.∼2022.(3개년)	2020. 1.∼12.(1개년)
위 치	완산구 이동교 일원	- 지점(4개소) : 영생고 사거리, 선너머 사거리, 효자교 사거리, 추천대교 - 구간(2개소) : 송천역네거리∼전라고사거리, 꽃밭정이네거리∼삼성강남@
총사업비	1,200백만원(국 600, 시 600) - ’20년 : 100(국 100)	730백만원(국 365, 시 365) - ’20년: 565(국 365, 시 200)
사업내용	- 이동교 차로수 조정(5차로→6차로) - 교차로 선형개량 3개소 - 버스승강장 이설 - 도로 포장 및 교통시설 1식 등	- 차로 조정 - 미끄럼방지 포장 - 무단횡단 방지시설 설치 - 신호과속단속카메라 설치 등

□ 추진상황

○ 교통사고 잦은 곳 대상지 선정(도로교통공단, 전라북도, 전주시)   : ’19.  6.

○ 개선계획 관련 유관기관 회의(완산경찰서, 도로교통공단)  : ’19. 10.

○ 기본 및 실시설계용역 착수(이동교 및 교통사고 잦은곳 3개소) : ’20.  1.

○ 기본 및 실시설계용역 착수(교통사고 잦은곳 3개소)         : ’20.  2.

□ 문제점 및 대책

○ 총사업비 1,930백만원 중 665백만원(국 465, 시비 200) 확보

□ 원활한 사업추진을 위하여 부족분 추경예산(이동교 100백만원, 교통사고 165백만원) 확보

□ 금후계획

1	이동교 일원 구조개선	2	교통사고 잦은 곳 개선
◦기본 및 실시설계용역 추진 : '20. 1.∼6. ◦1회 추경예산 확보 : '20. 7. ◦공사 추진 : '20. 7.∼'22. 12.		◦계획보고 및 관계기관 협의 : '20. 3. - 완산경찰서, 해당구청 ◦실시설계 완료 및 공사 착수 : '20. 4.

생태하천팀

주요 지방하천 정비사업

○ 하천 재해로부터 인명 및 재산피해를 예방하고, 수생태 회복과 수질개선을
통해 시민에게 친수공간 제공

□ 사업개요

구 분	삼 천	아 중 천	독 배 천	금 학 천
사업기간	2011.∼2020.(10개년)	2017.∼2021.(5개년)	2014.∼2020.(7개년)	2016.∼2021.(6개년)
위 치	원당교 ~ 전주천 합류점	재전마을 ~ 소양천 합류점	용복동 일원 ~ 삼천 합류점	팔복동 전주페이퍼 ~ 전주천 합류점
총사업비 (백만원)	28,693(국․도 20,085 시8,608) - '20년:0	30,000(국․도 15,000 시 15,000) - '20년:2.575(국․도 2,575)	28,312(국․도 19,818 시 8,494) - '20년:4,588(국․도 1,188, 시 3,400)	20,544(국․도 14,381 시 6,163) - '20년:4,019(국․도 4,019)
사업내용	◦생태하천복원 L=9.8km, - 호안(1.8km) 정비 - 산책로(2.1km) 정비 - 수달․반딧불이 서식처 조성 - 생태학습장 조성	◦생태하천 복원 L=6.25㎞ - 오니준설 및 수생태계 복원 - 자연형 환경정비, 친수공간 조성 등	하천정비 L=5.72km, 교량 13개소, 저류지 1식 등	하천정비 L=2.2km, 교량 1개소, 펌프장 1개소 등

※ 시비 미확보 : 4,297백만원(아중천 2,575 금학천 1,722)

□ 추진상황

(삼  천) ○ 공사 추진(공정율 95%)	: ’13. 12.∼
- 호안(1.8km), 산책로(2.1km) 정비, 수달서식처 조성 16,108㎡

(아중천) ○ 아중천 건설사업관리용역 착수 및 1공구·2공구 복원사업 착공 : ’19. 11.∼

(독배천) ○ 공사 추진(공정율 50%)	: ’15. 12.∼
- 교량 6개소, 호안정비 및 제방포장 3.0㎞ 등

(금학천) ○ 공사 추진(공정율 10%)	: ’18. 12.∼
- 수목이식, 철도구간 사면보강

□ 금후계획

(삼  천) ○ 매립폐기물 선별 및 처리, 생태학습장 조성      : ’20.  3.∼

(아중천) ○ 건설사업관리용역 및 1공구·2공구 복원사업 진행        : ’20.  3.∼

(독배천) ○ 교량 7개소, 저류지, 호안, 제방도로 등 공사추진 : ’20.  3.∼

(금학천) ○ 유지용수공 매설 및 공업용수 이설 추진        : ’20.  3.∼

걷고싶은길조성팀

전주시 걷고싶은길 통합관리

○ 주요 길에 대한 데이터 구축과 통합 조정 등을 통한 길 간의 연계코스를

마련하고, 길마다의 지역성과 역사성에 맞는 스토리텔링을 개발하여

시너지 효과 극대화

□ 현    황

○ 우리시 주요길 : 총 13개소

- 조성완료 : 12개(천년전주 마실길, 삼천 마실길, 모악산 마실길, 한옥마을 둘레길, 도란도란

시나브로길, 전북 순례길, 역사탐방길, 생태길, 전주부성 옛길, 건지산 학술림 탐방길, 숲길, 전주 천년고도 옛길)

- 추 진 중 : 1개(도시 바람길 숲)

○ 현 실태 : 각 부서별로 기존 길을 조성․관리하고 있으나, 조성된 길들간의

연계성이 부족하여 활성화가 되지 않음

□ 추진방향

○ 기존에 조성된 테마별 둘레길을 보완․연계하여, 그동안 특정가로       중심에서 이루어졌던 보행 네트워크를 시 전 지역으로 확대

- 기존 둘레길을 활용한 통합 안내체계 구축

- 둘레길 이용자에게 쾌적한 환경 제공을 위한 편의시설 지원

- 지역성․역사성에 기반한 스토리텔링 개발로 흥미유발

- 주변 명소와 기존 둘레길 간 통합 연계 방안 강구

○ 인접 시․군과 연계한 광역 코스 개발

□ 금후계획

○ 우리시 기존 둘레길 관련 자료 수집 및 조사        : ’20. 2.∼4.

○ 타 지자체 추진 사례 수집 및 벤치마킹               : ’20. 5.∼6.

○ 전문가 자문기구 구성(기존 다울마당 활용도 검토)   : ’20. 7.∼8.

○ 걷고 싶은 길 통합관리 계획 수립                   : ’20. 9.

○ 전주시 걷고 싶은 길 조성 종합계획 수립용역 추진      : ’20. 10.∼’21. 3.

시민의숲1963추진단 소 관

□	전주 종합경기장 부지재생	----	72
□	대한방직 부지 관련 공론화위원회 추진	----	73
□	전주 육상경기장 증축 및 야구장 건립	----	74
□	전시컨벤션·호텔 건립	----	75

1963기획팀

전주 종합경기장 부지재생

○ 전주시민의 추억이 깃들어 있는 종합경기장의 정체성을 지켜내는 한편,
시민들의 다양한 욕구를 충족시킬 수 있는 재생계획을 수립하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. ∼ 2024.(6개년)

○ 위    치 : 전주시 덕진구 기린대로 451 일원

○ 사업면적 : 122,975㎡

- 육상경기장 39,970㎡, 야구장 19,230㎡, 기타 63,775㎡

○ 사업내용

- 시민의 숲(정원의 숲, 예술의 숲, 놀이의 숲, 미식의 숲, MICE의 숲 등)

- 전시컨벤션센터/호텔 건립, 백화점 등

- 재생 주제별로 구역 설정, 구역별 개별사업 추진

※ 기본구상 용역 결과를 토대로 구체적 사업계획 및 사업비 확정

◈ 전주 종합경기장 부지재생 기본구상(기본계획) 수립 용역

○ 용역기간 : 2019. 11. ~ 2020. 9.

○ 용 역 비 : 419,914천원

○ 과업내용 : 기초조사, 사례조사 및 벤치마킹, 시민의견수렴

도입시설 및 운영계획 구상, 건축가이드라인 제시

공간 기본배치 구상, 교통‧동선계획, 조경‧녹지계획

시설수요예측, 시설규모확정, 타당성분석 등

□ 추진상황

○ 기본구상 용역 계약 및 착수	: ’19. 11.

○ 기초조사 및 분석, 관련계획 검토 완료	: ’20.  1.

○ 전문가자문단 위촉	: ’20.  1.

□ 금후계획

○ 시민참여단 구성 및 운영	: ’20.  2.∼ 9.

○ 헌수사무실 및 소통공간 건립·운영	: ’20.  3.∼

○ 시민아이디어 공모	: ’20.  4.∼ 7.

○ 기본구상용역 완료	: ’20.  9.

○ 행정절차 이행	: ’20. 10.∼’21. 11.

- 도시관리계획 변경, 기본 및 실시설계, 건축허가 등

○ 사업추진	: ’21.∼’24.

1963기획팀

대한방직 부지 관련 공론화위원회 추진

○ 대규모 도심 유휴지에 대하여 주민의 적극적인 참여를 통한 사회적
합의를 도출하고, 투명한 정책 결정으로 행정의 신뢰도 향상

□ 현    황

○ 위    치 : 완산구 유연로 220 일원

○ 면    적 : 14필지 / 230,565㎡

○ 용도지역 : 도시기본계획 – 주거용지

도시관리계획 - 공업지역 222,692㎡, 자연녹지 7,873㎡

○ 소 유 자 : 전라북도 6,228.4㎡, 전주시 7,873㎡, ㈜자광 216,463.6㎡

○ 사 업 비 : 180백만원

□ 추진상황

○ 주민제안(지구단위계획) 신청서 제출 (토지소유자→시)	: ’18. 11.

○ 수용불가 회신 (시→토지소유자)	: ’18. 11.

- 도시기본계획 불부합, 재산관리청(전북도)의 의견 불명확

○ 정책제안서 제출 (토지소유자→시)	: ’19. 3.

- 전주‘타워복합개발’정책제안서 제출 (주민제안 신청 내용과 동일)

○ 정책제안서 변경 제출 (토지소유자→시)	: ’19. 5.

- 컨벤션센터 ⇒ 복합문화센터 혹은 문화예술의 전당 변경 제안

○ 2019년 예산결산위원회 권고	: ’19. 7.

- 대한방직관련 공론화위원회 조속히 구성 및 예산확보

○ 공론화위원회 추진계획 수립	: ’19. 11.

	[ 토지소유자 주요 제안 내용 ]
○ 주요개발 (공업지역·녹지지역 → 상업지역) - 공동주택(60층이하) 3,000세대/65,207㎡, 타워(430m) 및 호텔(350실) 22,329㎡ - 백화점·쇼핑몰·영화관 21,350㎡, 복합시설(지상 녹지, 지하 상업) 79,121㎡ ○ 기부시설 - 기반시설(도로,공원,공공공지) 22,015㎡, 복합문화센터 17,000㎡ - 전주시가 필요한 공공시설(750억원 규모) 별도 제안

□ 금후계획

○ 공론화 사전준비위원회 구성 및 운영	: ’20.  2.∼ 3.

○ 공론화위원회 구성 및 운영	: ’20.  3.∼10.

○ 공론화 위원회 결과 보고(위원회→전주시)	: ’20. 10.

경기장이전팀

전주 육상경기장 증축 및 야구장 건립

○ 노후된 현 전주 종합경기장 및 야구장 기능을 대체하고 쾌적한 체육시설을
조성하여 시민의 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. ∼ 2023.(5개년)

○ 위    치 : 전주시 덕진구 온고을로 644 일원

○ 사업면적 : 122,958㎡

○ 사업내용

- 1종 육상경기장 1식(15,000석, 연면적 11,609㎡, 준비운동장 포함)

- 야구장 1식(8,000석, 연면적 10,037㎡)

○ 사 업 비 : 900억원(시비 630억원, 지방채 270억원)

□ 추진상황

○ 2019년 지방재정 투자심사 완료	: ’19.  7.

○ 편입토지 감정평가 및 협의 매수 추진           : ’19.  8.∼

○ 건축 설계공모 추진 및 각종 용역 추진	: ’19. 11.∼

◈ 건축 설계용역(설계공모) 추진

- 용역비 : 금3,796백만원 / 용역기간 : 2020. 3 ~ 11.(9개월)

- 작품심사 및 당선작 선정 : 2020. 2. 27.(목)

□ 금후계획

○ 설계공모 당선작 선정 및 설계용역 추진        : ’20.  2.∼11.

○ 행정절차 이행 및 미협의 토지수용 재결	: ’20.  6.∼12.

- 환경·교통·재해·실시계획인가, 건축허가, 건축·경관 심의 등

○ 공사추진	: ’21.∼’23.

컨벤션시설팀

전시컨벤션‧호텔 건립

○ 전시‧컨벤션 인프라 구축으로 한옥마을 등 지역 관광자원과의 시너지 효과를
창출하여, 지역경제 활성화를 이끌 MICE산업의 핵심기지를 조성하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. ∼ 2024.(6개년)

○ 위    치 : 전주시 덕진구 기린대로 451 일원

○ 사업면적 : 17,800㎡

○ 사업내용

- 전시컨벤션 : 전시장 5,000㎡, 국제회의장 1실(2,000명 수용), 중소회의실 10실

- 호      텔 : 200실 이상

○ 사 업 비 : 1,300억원 정도(민간자본)

○ 사업방식 : 민간자본유치(백화점 부지 장기임대에 따른 기여)

□ 추진상황

○ 민간사업자 협상 추진	: ’19. 12.∼

- 협약서(안) 작성 관련 법률 자문 병행

○ 임대료 및 임대기간 산정 용역 시행	: ’19. 12.

□ 추진계획

○ 타당성조사 시행	: ’20.  4.∼

○ 임대료 및 임대기간 산정 용역 완료	: ’20.  5.

○ 시의회 변경동의안 제출	: ’20. 11.

- 사업 계획 및 공유재산 관리계획

○ 기존 협약 해지 및 시행협약 체결	: ’20. 12.

○ 지방재정 투자심사 의뢰	: ’21.  1.

○ 행정절차이행	: ’21.   1.∼ ’21. 12.

- 도시관리계획 변경, 기본 및 실시설계, 건축허가 등

○ 사업추진	: ’22.∼’24.