제376회 전주시의회 제2차 정례회 2020년도 행정사무감사 복 지 환 경 위 원 회

2020년도

주요업무 추진상황 보고

맑은물사업본부

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진계획
	○	수 도 행 정 과	-------	5
	○	급 수 과	-------	9
	○	수 질 관 리 과	-------	17
	○	하 수 과	-------	23

일  반  현  황

□ 기   구 : 4과 15팀

									맑은물사업본부
	수도행정과 (4팀)							급 수 과 (4팀)								수질관리과 (3팀)								하 수 과 (4팀)
	수도행정							맑은물공급								수질관리								하수행정
	완산요금							급수시설								수질분석								하수시설
	덕진요금							누수방지								시설관리								하수정비
	체납징수							계량기관리																지하수관리

※ 서신통합센터, 누수신고센터, 계량기시험소, 사업장 15개소(취수장 1, 배수지 10, 정수장 1, 가압장 3)

□ 정‧현원

부서 직렬		정 원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과	하 수 과
합 계		85	81	19	18	28	15
일 반 직	소계	82	77	19	18	25	15
	4급	1	1	1	-	-	-
	5급	4	4	1	1	1	1
	6급	23	22	5	4	9	4
	7급	29	24	8	5	6	5
	8급	13	4	1	2		1
	9급	12	22	3	6	9	4
연 구 직		3	4	-	-	3	1

※ 공무직 38명 (수도행정과 13, 급수과 21, 수질관리과 2, 하수과 2), 청경 1명(수질관리과) 부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
수도행정과	○ 맑은물사업본부 운영 총괄 ○ 상수도공기업 특별회계 운영 ○ 공사 및 용역 계약, 물품관리 ○ 상수도요금 조정 및 관련조례 제․개정 ○ 검침업무 운영 및 관리 ○ 상하수도요금 과징업무 전반
급 수 과	○ 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 ○ 상수도 중장기계획 수립․시행 ○ 비상급수계획 및 대책수립 총괄 ○ 급수공사, 상수도 증설 및 확장공사 ○ 간이상수도 유지관리업무 ○ 누수탐사 및 누수복구업무, 누수방지대책 수립 ○ 누수신고센터 운영관리 ○ 급수중지․개전․폐전에 따른 계량기 관리 ○ 고장․노후계량기 교체관리 ○ 계량기시험소 운영관리
수질관리과	○ 생활용수 공급 및 공업용수 생산․공급 ○ 광역상수도 수요에 따른 수급조절 및 관리 ○ 각 사업장 구축물․건물 유지보수 및 안전관리 ○ 국가공인수질검사기관 적정운영 및 정도관리 ○ 먹는물 공동시설(약수터) 및 간이상수도 수질검사 ○ 상수도 원․정수 수질관리 및 보전 ○ 상수원보호구역 관리
하 수 과	○ 하수도정비 기본계획(변경) 수립 ○ 하수도공기업 특별회계 운영 ○ 하수관로 정비사업 ○ 하수관로정비 민간투자(BTL)사업 유지관리 ○ 마을하수도 시설 및 유지관리 ○ 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리 ○ 효율적인 지하수 및 빗물이용 관리

기  본  현  황

(2020. 10.  31일 기준)

□ 급수현황

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전 (개)	유수율 (%)	급수량(천㎥/일)
						계	생활 용수	공업 용수
665,806	664,476	99.8	408	240,138	78.3	268	233	35

□ 상수도관

(단위 : ㎞)

총 연 장	도․송수관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,550	75	922	1,553

□ 상수원 보호구역

구 분	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎡)	상류(m)	하류(m)		안내판	표주
방수리	284,775	1,000	500	’72. 5. 5.	8	26

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

□ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	하수인구 보급율 (%)
계		202.5	2,330	1,694	98.6
합 류 식			0	401
분류식	소 계	202.5	2,330	1,293
	오수관거		1,103	770
	우수관거		1,227	523

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	환기구 (개소)	우수토실 (개소)
계	88.9	1,010	73	251
전주천 (좌, 우안)	25.3	369	37	142
삼 천 (좌, 우안)	12.3	155	18	45
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	9	38
아 중 선	12.0	174	4	16
팔복선(공장,생활)	16.9	183	5	8
상 관 선	10.4	47		2
기타(구화천,태평로, 연화천,덕적천,중복천)	7.6

□ 하수․위생처리 시설

구 분	환 경 사 업 소	수 질 복 원 센 터
위 치	전주시 덕진구 고내천변로 58	전주시 덕진구 중동로 150
면 적	320,990㎡	30,182㎡
시설규모 (처리용량)	규 모 : 403,000㎥/일 - 1단계 : 113,000㎥ (1990년) - 2단계 : 190,000㎥ (1997년) - 3단계 : 100,000㎥ (2005년)	규 모 : 16,500㎥/일 (2015년)
부대시설	° 위생처리장(290㎘/일) : 2002년 ° 총인처리시설(403,000㎥/일) : 2015년 ° CSOs처리시설(100,000㎥/일) : 2015년

수도행정과 소관

□	정확한 자료로 신뢰받는 상·하수도 요금 부과	----	6
□	고객 중심의 알림(예고 및 문자) 서비스 제공	----	7
□	상·하수도 요금 체납 징수율 향상	----	8

완산·덕진요금팀

정확한 자료로 신뢰받는 상·하수도 요금부과

○  수도계량기 검침설비 구축·관리와 수용가 부과자료의 철저한 정비로

정확한 상·하수도 요금부과를 통한 신뢰받는 수도 행정구현

□ 사업개요

○ 검침전수 : 240,138전

- 일반주택 :  81,013(완산 41,937.   덕진 39,076)

- 공동주택 : 159,095(완산 87,290.   덕진 71,805)

- 공    단 :      30(완산      4,   덕진    26)

○ 검 침 원 : 173명

- 일반주택 :  73(완산 39,  덕진 34)

- 공동주택 : 100(완산 55,  덕진 45)

○ 기준요금 : 1,290원/㎥ (상수도 720, 하수도 400, 물이용부담금 170)

※ 가정용 기준 20㎥이하

○ 부과현황

구 분	합 계	가정용	일반용	대중탕용	산업용
계	95,644 454만	50,515 400만	38,991 48만	756 1,007	5,382 889
상수도	56,717 236만	33,061 210만	19,745 26만	452 561	3,459 238
하수도	38,927 218만	17,454 190만	19,246 22만	304 446	1,923 651

(’20. 10. 31.기준, 단위 : 백만원 / 건)

※ 월 평균 부과액 : 9,564백만원

□ 금후계획

○ 요금 및 검침관련 직원, 검침원 직무교육 강화      : 월 1회

○ 검침원 정례 검침후 확인자료의 지속적인 관리   : 월 1회

- 업종변경, 수도계량기 고장, 현장민원, 불편사항 등

○ 다량 급수업소 일제점검 실시                 : 년 2회(4월, 10월)

- 일반용 300㎥ 이상, 대중탕용 1,500㎥ 이상 사용자에 대하여

연초 대상 선정 후 분기별 지속적인 누적관리

완산·덕진요금팀

고객 중심의 알림(예고및문자) 서비스 제공

○ 상수도 체납 단수 및 누수로 인한 민원발생요인에 대하여 사전

문자 알림 서비스를 통하여 주민편익 도모와 신뢰 받는 수도행정 구현

□ 사업개요

○ 대    상

- 누수 및 과다사용 수용가

- 상수도 월 30㎥이상 사용 수용가중 평소 사용량의 2배 사용자

- 수도 사용료 체납자중 단수 예정 수용가

○ 알림내용 : 누수 및 과다 사용, 사용료 체납 단수 예고 등

○ 예고방법

- 1차 : 『빨간 신호등이 켜졌습니다』 예고장 및 계고장 부착

- 2차 : 휴대폰 문자서비스 안내

□ 추진상황

○ 누수 및 과다 사용자 예고 : 연중

- 전월대비 30% 이상 수용가 예고        : 매월 10,000건 정도

○ 체납 단수 예정 계고장 부착             : 8,562건 정도(10월말)

○ 수돗물 6개월 이상 『0』㎥ 사용 수용가 점검 : 년1회 (10월)

- 수용가 5,070건중 67건 직권처리(폐전 22, 중지 44, 기타 1)

○ 민원서비스 개선에 대한 검침원·단속반 교육	: ’20. 2. ∼

□ 문제점 및 대책

○ 그동안 해당 수용가에 대하여 알림장 및 계고장 부착으로 통지        하고 있으나 사전인지 못 했다는 이유로 잦은 민원 발생

□ 사전 예고와 문자알림 서비스를 통하여 민원해소 및 수도서비스 만족도 증진

□ 금후계획

○ 서비스 시행	: 연중

○ 유선방송 등 언론을 통한 수돗물 사용관련 홍보 강화

체납징수팀

상·하수도 체납요금 징수율 제고

○ 체납자에 대한 상시독려, 단수예고, 정수처분을 통한 체납요금 조기징수와

자진 납부의식 제고 및 상습·고액체납자 징수강화로 안정적인 세입확보

□ 과징현황 (2020. 11. 2. 기준)

(단위 : 백만원)

구 분		조정액	징수액	결 손	체납액	징수율(%)
합 계		108,470	106,078	64	2,328	97.79
상수도	계	58,346	57,035	27	1,284	97.75
	현년도	56,943	55,805	0	1,138	98
	과년도	1,403	1,230	27	146	87.67
하수도	계	50,124	49,043	37	1,044	97.84
	현년도	48,961	48,065	0	896	98.17
	과년도	1,163	978	37	148	84.09

□ 징수목표

○ 총 징수율 목표 : 98.5% (현년도 98.8%, 과년도 88.4%)

○ 체납액 징수목표 : 전년도 체납액의 89%(23억원)

□ 금후계획

○ 체납단수반 확대운영 : 단수처분시 납부율 90% 이상

- 단 수 반 : 2개반 4명 (기간제 보조요원 4명 투입)

- 코로나19 관련 단수처분 중지 ⇒ 사회적거리 1단계 단수처분 강화

- 계고장 교부 및 납부독려 : 31,325전 155,554건 6,719백만원

○ 단수 계고장 송달 : 월 1회

- 대   상 : 2건 이상 또는 5만원 이상 체납수용가

- 정수처분 대상 수용가에 단수계고 안내문 우편발송

○ 특별징수기간 운영 : 연 3회(5월, 9월, 12월)

○ 상습·고액 체납자 채권확보 강화

- 부동산, 예금, 매출채권 등 각종 재산압류 및 공매·추심

- 18명 269백만원 압류 실시 (8명 94백만원 징수)

○ 체납요금 조기납부 홍보활동 : 다량수용가 홍보 및 언론보도 등

급 수 과  소 관

□	수도정비 기본계획 수립 용역	----	10
□	맑은물공급사업(노후상수관망 정비) 2단계	----	11
□	노후 상수관로 정밀조사용역	----	12
□	지방 상수도 현대화 사업	----	13
□	스마트 관망관리 인프라 구축사업	----	14
□	공동주택 등 노후 급수설비 지원사업	----	15
□	노후 및 고장계량기 교체사업	----	16

급수시설팀

수도정비 기본계획 수립 용역

○ 수도법 제4조 및 제74조의 규정에 의한 수도정비 기본계획을 종합적으로     검토 수립하고, 수도시설에 대한 기술진단용역을 실시하여 수요변화에     따른 공급 및 수급능력의 적정성을 확보하고 합리적 체계적 운영관리

□ 용역개요

○ 위    치 : 전주시 일원

○ 용역기간 : 2020. 3. ∼ 2022. 12.

○ 총용역비 : 3,000백만원(’20년 500, ’21년 850, ’22년 1,650)

○ 용역내용

【 수도정비기본계획 : 수도법 제4조 】

- 수돗물의 중장기 수급에 관한 사항 및 배수지별 수계 적정성 검토

- 수도시설의 배치 구조 및 공급능력 검토

- 수도관의 현황조사 및 개량 교체에 관한 사항 검토

- 수도시설의 블록화, 정보화, 유지관리 시스템 연계에 관한 사항 검토

- 수도시설의 재원조달 및 실시순위 검토, 기타 시설의 안정화 방안 검토

【 상수도 관망 기술진단 : 수도법 제74조 】

- 상수관망(송·배수관) 등 수도시설에 대한 기술진단

【 상수도 관망 기술진단 : 수도법 제74조 】

- 상수관망(송·배수관) 등 수도시설에 대한 기술진단

- 상수관망(송·배수관) 등 수도시설에 대한 기술진단

□ 추진상황

○ 최초 수도정비 기본계획 수립(10년마다 수립)               : ’02. 12.

○ 수도정비기본계획 타당성 검토(5년마다 검토 변경)          : ’17. 12.

※ 지방상수도 현대화 사업과 중복된 내용은 사전조율 제척

□ 금후계획

○ 일상감사 및 사업 수행능력 평가                 : ’20. 11. ∼ 12.

○ 용역업체 선정 및 적격심사 계약                  : ’20. 12.

○ 용역 시행                                         : ’21. ∼ ’22.

맑은물공급팀

맑은물공급사업(노후상수관망정비) 2단계

○ 유수율 85%이상 향상으로 선진화된 급수체계 구축과 맑고 깨끗한      수돗물을 공급함으로써 상수도 경영합리화 및 시민이 직접 느낄수      있는 상수도 수질개선 도모

□ 사업개요

○ 사업위치 : 서신동 등 18개 블록 (1차 7, 2차 6, 3차 5)

○ 사업규모 : 노후관로 교체 및 블록시스템 구축

○ 총사업비 : 46,548백만원(’20년 본예산까지 기투자액 33,235백만원)

○ 사업기간 : 2017. ∼ 2022.(6개년)

□ 추진상황

(단위 :백만원)

구분		연도	블록	연장 (km)	사업비	비고
계			68	776	207,748
1단계		’09. ~ ’16.	50	655	161,200	중앙동, 노송동 등15개동
2 단 계	소계		18	121	46,548
	1차	’17. ~ ’19.	7	36	10,581	효자동, 삼천동 일부
	2차	’18. ~ ’20.	6	26	10,567	우아동, 금암동, 호성동 일부
	3차	’20. ~ ’22.	5	59	25,400	서신동, 중화산동 일부

□ 금후계획

○ 맑은물공급사업  2단계 3차분 공사추진(공정 18%) : ’20. 4. ∼ ’22. 10.

- 서신급수구역 5개블록(서신동 및 중화산동 일부)

맑은물공급팀

지방상수도 현대화 사업

○ 인천 수돗물사건 이후 노후 상수관로에 대한 수질관리의 안전성에

기여하고자 노후 상수관로의 조기 정비 추진으로 먹는 물 안전 확보

□ 사업개요

○ 사업위치 : 상수도 미정비 60개 블록

○ 사업규모 : 노후 상수관로 교체 및 개량(상수도 유수율 85% 이상 향상)

- 관로 교체 및 개량 L=273km, 유지관리시스템 연계 블록구축 1식

○ 사업기간 : 2020. ∼ 2024.(5개년)

○ 총사업비 : 484억원[국비(50%) 242, 도비(10%) 48, 시비(40%) 194]

※ 사업성과 인센티브 국비 추가확보(2%), 시부담금 2% 절감(1,050백만원)

□ 추진상황

○ 지방 상수도 중기지방재정계획수립                   : ’19. 10.

○ 수자원공사와 위·수탁사항 협의 및 협약체결         : ’19. 12.

○ 금암 급수구역 우선 사업 대상지 선정 및 조사             : ’20. 6.

□ 금후계획

○ 금암 급수구역 유수율 향상 사업 추진(4블록)        : ’20. 8. ∼

○ 지방 상수도 현대화 사업 설계용역 추진(56블록)     : ’20. 9. ∼

○ 현대화사업 추진                          : ’21. 11. ∼ ’24. 12.

누수방지팀

스마트 관망관리 인프라 구축사업

○ 인천 사건 이후 먹는 물 안전 관리 강화를 위한 근본적인 대책

수립에 따라 수돗물 공급과정에 감시체계를 구축

○ 사고발생을 사전에 방지하고, 사고 발생시 신속한 대응이 가능

하도록 인프라 구축하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 2021. 12.

○ 사 업 비 : 총사업비 15,644백만원[국비(70%), 시비(30%)]

※ ’20년 예산 9,700백만원, ’21년 예산 5,944백만원

○ 사업내용

- 수질관리 및 감시시스템 구축

․ 재염소 설비, 정밀여과장치, 수질측정장치, 자동드레인, 스마트 수압계 등

- 사고발생시 위기대응 시스템 구축 : 관 세척 인프라 설치

□ 추진상황

○ 스마트 관망관리 인프라 구축사업 확정통보       : ’19. 10.

○ 수도정비 기본계획 변경용역 및 요청(시→환경부)    : ’19. 11.

○ 수도정비 기본계획 변경 고시(시→도→환경부)        : ’20. 1.

○ 스마트 관망관리 기본계획 수립(환경부)         : ’20. 3. ∼ 10.

□ 금후계획

○ 스마트 관망관리 위·수탁체결(수자원공사)           : ’20. 11.

○ 스마트 관망관리 1차분 시행                   : ’20. 11. ∼ 12.

○ 스마트 관망관리 2,3차분 시행                  : ’21. 1. ∼ 11.

○ 스마트 관망관리 사업완료                        : ’21. 12.

급수시설팀

노후 상수관로 정밀조사 용역

○ 인천 사건 이후 환경부 주관 시범적으로 노후 상수관로에 대한

현황을 조사하여 조기 상수도관로 정비계획을 수립하고

○ 국가주도의 전국 동일 기준의 상수관로 상태검증 및 향후 노후

관로정비사업 지원근거 필요

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 전역

○ 용역기간 : 2020. 2. ∼ 12.

○ 사 업 비 : 957백만원[국비(70%) 670, 시비(30%) 287]

○ 용역규모 : 상수관로 정밀조사(L = 571km)

○ 용역내용 : 노후 상수관로 현황 및 정밀조사 용역 1식

□ 추진상황

○ 상수관로 정밀조사 대상 지자체 회의(환경부)            : ’19. 8.

※ 상수도 전문기관(한국수자원공사) 협약 시행조건 지원

○ 노후 상수관로 정밀조사 용역비(957백만원) 교부         : ’19. 11.

○ 위·수탁사항 협의 및 협약체결(전주시⇔수자원공사)     : ’19. 12.

○ 노후 상수관로 정밀조사 용역 추진(수자원공사) : ’20. 4. ∼ ’21. 2.

※ 지방상수도 현대화사업과 중복된 내용은 사전조율 제척

□ 금후계획

○ 용역 결과(사업비 산정)에 따라 환경부 협의       : ’21. 3. ∼ 6.

○ 노후 상수관로 교체공사 위탁(수자원공사) 시행    : ’21. ∼ ’24.

급수시설팀

공동주택 등 노후 급수설비 지원사업

○ 노후된 옥내 급수관의 개량에 필요한 공사비 일부를 지원하여

시민들에게 맑고 깨끗한 양질의 수돗물을 공급

□ 사업개요

○ 지원대상 : 배관 내부 부식으로 수질기준을 초과하는 경우

○ 사 업 비 : 223백만원(이월예산 103, 당해예산 120)

○ 지원대상

- 공동주택(85㎡이하, 50%이상 분양) : 총공사비의 50%이하(최대 30,000천원)

- 단독주택(85㎡ 이하, 주거용 주택) : 총공사비의 50%이하(최대 300천원)

- 학교, 사회복지시설 : 총공사비의 70%이하(최대 20,000천원)

□ 추진상황

년도	개소	금액(천원)	비 고
2014	3	42,135	공동주택 3
2015	11	222,487	공동주택 10, 학교시설 1
2016	11	174,847	공동주택 10, 학교시설 1
2017	2	21,622	공동주택 1, 사회복지시설 1
2018	9	189,910	공동주택 8, 학교시설 1
2019	6	95,750	공동주택 6

○ 그간 추진실적(2014. ∼ 2019.) : 총 37개소 746,751천원

○ 2020년 10월 현재 추진사항 ⇒ 4개소 / 54,215천원

- 사업완료 : 2개소/20,000천원(대종낙원맨션, 동성주택)

- 공 사 중

·1개소/17,165천원(대산 신천지@) → 공사완료후 지원금 지급

·1개소/17,050천원(거성맨션1차@) → 공사완료후 지원금 지급

□ 금후계획

○ 사업 활성화를 위해 대상지에 안내 공문 발송 등 적극적인 홍보 지속

○ 급수설비 지원사업 연중 접수 및 지원 추진

계량기관리팀

노후 및 고장계량기 교체 사업

○ 유효기간이 만료된 노후 및 고장난 수도계량기를 지속적으로

교체하여 상수도 행정의 투명성과 신뢰성을 향상하고 수용가에

질 높은 수도서비스 제공

□ 사업개요

○ 사업대상 : 유효기간 만료 및 고장, 동파 등 계량기

○ 관련법규 : 계량에 관한 법률 시행령 제21조(검정·재검정의 유효기간)

※ 검정유효기간 : 계량기구경 50mm이하(8년), 50mm초과(6년)

○ 사 업 비 : 1,937백만원(구입비 887, 교체비 1,050)

□ 추진상황

○ 2020년 수도계량기 교체사업(1차)           : ’20. 3. 30 ∼ 5. 8.

- 실적 : 3,643개(완산 1,844 덕진 1,799) / 191백만원(완산 96 덕진 95)

○ 2020년 수도계량기 교체사업(2차)           : ’20. 5. 27 ∼ 7. 6.

- 실적 : 3,621개(완산 1,657 덕진 1,934) / 181백만원(완산 90 덕진 91)

○ 2020년 수도계량기 교체사업(3차)           : ’20. 8. 3. ∼ 9. 11.

- 실적 : 3,110개(완산 1,639 덕진 1,471) / 180백만원(완산 90 덕진 90)

○ 2020년 수도계량기 교체사업(4차) 착공      : ’20. 10. 13.

○ 최근 3년 추진실적(계량기교체) : 67,521개(’18 ∼ ’20)

(단위:백만원)

구 분		계	2018년	2019년	2020년현재	비고
사 업 비		4,712	1,453	1,322	1,937
교체실적	계	67,521	21,199	26,259	20,063
	유 효 만 기	58,063	16,321	23,021	18,721
	고장 및 동파	9,458	4,878	3,238	1,342

○ 계량기 등 구입 (464백만원) : 12,150개(소형 12,000, 대형 150)

□ 금후계획

○ 계량기 교체 공사(단가계약) : 5회/년 실시(30,000개소 교체)

- 4차 교체공사(유효만기)                    : ’20. 11. ∼ 12.

- 5차 교체공사(유효만기 및 동파)            : ’20. 12. ∼ ’21. 3.

○ 계량기 구입 : 조달 구입 의뢰               : ’20. 12.

수질관리과  소관

□	깨끗하고 안전한 수돗물 공급 및 수질검사 확대	----	18
□	국가 공인 수질검사기관 효율적 운영	----	19
□	공업용수 노후 취수관 교체공사	----	20
□	금암배수지 내진 보강공사	----	21
□	깨끗한 수돗물 공급을 위한 상수도 시설정비	----	22

수질분석팀

깨끗하고 안전한 수돗물공급 및 수질검사 확대

○ 과학적이고 체계적인 수질관리 및 현장행정으로 시민과 함께하는      검증 등 확인을 통한 상수도 수질안전성 확보

□ 사업개요

○ 원수 ∼ 수도꼭지수까지 공급단계별 수질검사 확대

구 분	법 적 기 준	강 화 시 행
원 수 (상수원관리규칙 제24조)	매월 COD 등 6개항목 매분기 수은 등 31개항목	매월 37개항목
정 수 (먹는물수질기준및검사등에 관한규칙 제 4조)	매일 탁도 등 6개항목 1회이상 매주 대장균 등 7개항목 매월 비소 등 59개항목	매일 6개항목 6회 매주 15개항목 매월 59개항목 분기 46개항목 추가 (분기별 105개 항목 검사)
수도꼭지수 (먹는물수질기준및검사등에 관한규칙 제 4조)	월 77개소 잔류염소 등 4개항목	월 100개소 잔류염소 등 4개항목

□ 추진상황

○ 용담호 및 고산정수장 매월 정밀검사(한국수자원공사, 전주시)

○ 수돗물 안심확인제(인터넷 접수) : 107세대 민원 해결(시험성적서 배부)

○ 공동주택 방문 종합검사(깨끗한 수돗물 인증서 발급) : 107개소(’19. 155, ’18 147)

○ 다중이용시설 수질검사 : 60개소(노인요양시설 30, 학원 30)

□ 금후계획

○ 수돗물 안심확인제 지속추진 및 다중이용시설 수질검사 추가 확대 시행

- 우리집 수돗물 안심확인제 : 인터넷 접수 및 시험성적서 배부

- 다중이용시설 수질검사 : 40개소(노인요양시설 20, 학원 20)

□ 먹는물 사용실태 조사 및 음용수(정수기, 먹는샘물 등)와

수돗물 비교 검사로 안전한 물 음용토록 계도

수질분석팀

국가 공인 수질검사기관 효율적 운영

○ 수질검사 공인 검사기관의 효율적인 운영을 통하여 수돗물의

파수꾼 역할과 대시민 행정 서비스 강화

□ 사업개요

○ 공인 검사기관 공공성 및 신뢰성 확보를 위한 분석능력 제고

- ’20 환경부 분석능력 평가 결과 국내 106개 기관중 우수성적 달성

○ 먹는물 및 생활속 물관리 상태 철저한 검증

- 수돗물, 약수터, 공원음수대, 수영장수, 목욕장수, 수경시설,

민방위 비상급수시설 등 안전성 조사

※ 운영인력 6명(환경연구사 2, 환경 3, 의료기술 1)

□ 추진상황

○ ’20 환경부 분석능력 평가 결과 국내 최상위 기관 선정

※ 환경부 국립환경과학원 『먹는물 수질검사기관 제33호』지정 - ’00. 7.

○ 먹는물 및 생활속 물관리 상태 철저한 검증(2,962건)

- 수돗물(2,097), 약수터(20), 수영장수(42), 수돗물 안심확인제(107),

목욕장수(43), 수경시설(149), 공동주택 수돗물 인증서(107),

민방위 비상급수시설(90), 기타 등(303)

□ 금후계획

○ 수질분석 능력 배양을 위한 자체 정도관리 강화

○ 현장방문 수질검사 서비스 강화를 통한 시민건강 증진

○ 연간 1,800여 수질검사 의뢰 시료에 대한 신속한 처리

시설관리팀

공업용수 노후 취수관 교체공사

○ 만경강 하천에 매설되어 있는 취수 유공관이 내부퇴적 및 노후로

개량을 통한 안정적인 공업용수 확보

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020. 1. 〜 12.

○ 대  상 : 덕진구 전미동 만경강 하천(취수용량 70,000㎥/일)

○ 사업비 : 1,000백만원

○ 내  용 : 공업용수 취수관 개량(L=460m, D=800∼1,350mm)

□ 추진상황

○ 전미취수장 정밀안전진단 용역 시행            : ’19. 5. ∼ 8.

⇒ 진단결과 취수관 내부 퇴적물질 등으로 인한 유입수 부족 및

기계시설물 손상 우려로 개량필요

○ 실시설계 용역(정밀안전진단 결과 반영 등) 추진 : ’20. 3. ∼

□ 금후계획

○ 관련기관 협의(익산지방국토관리청, 완주군청)    : ’20. 11.

○ 일상감사 의뢰 등 행정절차 이행                : ’20. 11.

○ 공사 착공                                     : ’20. 12. ∼

□ 기대효과

○ 갈수기 등 공업용수 취수에 만전을 기하여 원활한 공업용수 공급        으로 공장 생산활동에 기여

시설관리팀

금암배수지 내진 보강공사

○ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조 규정에 의한

구조안전 진단에 따른 내진 보강으로 배수지 관리에 기여

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020. 1. 〜 12.

○ 대  상 : 덕진구 인후동 2가 금암배수지(V=7,000㎥)

○ 사업비 : 450백만원

○ 내  용 : 내진보강 742㎡, 배수지 및 유입·유출 밸브실 단면보강 등

□ 추진상황

○ 정밀안전진단 및 내진성능 평가용역 시행       : ’16. 9. ∼ 12.

⇒ 지진시 벽체 중간부 철근량 부족 및 불안전성으로 보강필요(C등급)

○ 실시설계 용역(정밀안전진단 결과 반영 등) 추진 : ’20. 3. ∼ 5.

○ 행정절차(일상감사 등) 이행 및 공사발주        : ’20. 6.

○ 내진보강공사 추진(공정율 95%)                 : ’20. 6. ∼ 11.

□ 금후계획

○ 공사 준공                                     : ’20. 11.

□ 기대효과

○ 자연재해(지진)로부터 주요 기간시설인 배수지 보호를 위한

내진보강으로 안정적인 생활용수 공급 기대 및 시설물 보호

시설관리팀

깨끗한 수돗물 공급을 위한 상수도 시설정비

○ 생활용수 및 공업용수 공급에 필요한 상수도 시설물의 사전점검

및 정비로 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020. 1. 〜 12.

○ 대  상 : 10개소(배수지 10개소)

○ 사업비 : 356백만원(노후시설 교체 200, 청소용역 156)

○ 내  용

- 깨끗한 상수도 공급을 위한 업무 체계화

→ 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼 작성

→ 배수지 청소(반기 1회), 환경정비(분기 1회), 위생상태 점검(월 1회)

※ 관련법령(수도법 제33조 및 같은법 시행규칙 제22조, 상수도 시설 유지관리 매뉴얼)

- 노후화된 시설물 정비

→ 송·배수관로 보수, 펌프·밸브·기계설비 등 교체 및 설치

□ 추진상황

○ 상수도 시설물 내부청소(상반기)               : ’20. 3. ∼ 5.

○ 취·정수장, 배수지 및 가압장 노후시설 정비 교체        : ’20. 1. ∼ 10.

□ 금후계획

○ 상수도 시설물 내부청소(하반기)               : ’20. 10. ∼ 11.

○ 취·정수장, 배수지 및 가압장 노후시설 정비 교체        : ’20. 11. ∼ 12.

하 수 과  소 관

□	생태도시 구현을 위한 하수관로 정비사업	----	24
□	전주 공공하수처리시설(4단계) 증설	----	25
□	농촌마을 환경개선 하수도 정비사업	----	26
□	체계적인 지하수 관리로 하수도 자주재원 확충	----	27
□	빗물이용시설 설치 지원 및 운영관리	----	28

하수시설팀

생태도시 구현을 위한 하수관로 정비사업

○ 쾌적한 생태도시 구현과 새만금 상류 수질개선에 기여하고, 오염 부하량

저감 및 불명수 감소로 하수처리 경영 합리화

□ 사업개요

○ 위    치 : 7개 처리구역 36개분구, 6개 지구, 취락지역 54개 마을 등

○ 사업기간 : 2002년 ∼ 2035년 (34년간)

○ 사 업 비 : 870,437백만원(국비 50%, 도비10%, 시비 35%, 기금 5%)

○ 사업규모 : 하수관로정비 1,015km, 배수설비 55,720개소

□ 추진상황

○ 2019년까지 완료(56.9%, 437,808백만원) : 5개 구역 6개 지구

- 하수관로 정비 578km, 배수설비 30,714개소

○ 2020년 계속사업(25.3%, 241,549백만원) : 8개 구역

- 하수관로 정비 256.5km, 배수설비 11,195개소

(단위 : km, 백만원)

사 업 명		사업규모	총투자 규모	기투자액	2020년	2021년 이후	추진실적/계획
총 계		256.5	241,549	89,397	14,922	137,503
계 속 사 업 ︵ ’14 ~ ’24 ︶	중앙(3,10) :노송동, 금암동, 인후동	55.3	39,741	38,435	1,573	-	-공사 준공(2020.7월) -공정률 100%
	덕진, 중앙(1) :덕진동, 송천동	19.5	14,890	14,890	-	-	-공사 중( ∼2021.7월) -공정률 72%
	중앙처리(8,9,10) : 한옥마을, 공구거리	7.1	6,823	6,823	-	-	-공사 중( ∼2021.7월) -공정률 58%
	팔복(1,2) : 팔복동	32.6	27,947	11,411	1,881	14,655	-공사중( ∼ 2022.12월) -공정률 38%
	중앙(9,10) : 중앙동, 풍남동, 노송동	33.6	36,542	6,368	9,148	21,026	-공사착공 예정(2020.11월)
	중앙(8) : 중앙, 풍남동	20.8	23,800	4,868	2,247	16,691	-공사착수(2020.7월) -공정률 5%
	화산(1,2,6,7), 아중(1) :완산, 서학, 삼천, 평화, 효자, 우아	47.2	47,406	4,002	70	43,334	-설계용역 중(2020. 12월 완료) -공사발주예정(2021.하반기)
	중앙(6,7) : 중앙동, 진북동	40.4	44,400	2,600	3	41,797	-설계용역 중(2020. 12월완료) -공사발주예정(2021.하반기)

□ 금후계획

○ 잔여 사업(17.8%, 191,080백만원) 계속 추진 : ∼ ’35년 까지

- 하수관로 180.5km, 배수설비 13,811개소

하수정비팀

전주 공공하수처리시설(4단계) 증설

○ 에코시티, 효천지구 택지개발 및 향후 도시개발에 따른 유입하수량

및 오염부하량 증가에 따른 공공하수처리시설 증설 필요

* 국무총리 주재 제16차 새만금위원회에서 새만금 목표수질 달성을 위한 추가 보완대책 발표(2015. 12. 4.)

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017년 ∼ 2024년 (8년간)

○ 위    치 : 덕진구 고내천변로 58 (3단계 처리장 인접부지)

○ 사업규모 : 하수처리장 증설 36,000㎥/일 (※ 현재 403,000㎥/일)

○ 사 업 비 : 794억원 (국비 308, 도비 154, 시비 332)

※ 2020년 : 1,689백만원(시비)

□ 추진상황

○ 전주시 하수도정비기본계획 부분변경(증설49,000㎥/일) 승인  : ’15. 12.

○ 예비타당성조사 면제사업 조건부(적정성검토) 선정(기재부)   : ’17. 2.

○ 하수처리장 증설사업 적정성 검토(KDI, 36,000㎥/일)    : ’19. 1.

○ 중앙부처(기재부, 환경부) 협의 확정(36,000㎥/일)       : ’19. 1.

○ 사업추진방침 결정(재정사업 일반공사, 전문기관 위탁)  : ’19. 12.

○ 4단계 증설사업 위·수탁 협약 체결(전주시⇔한국환경공단)    : ’19. 12.

○ 기본 및 실시설계용역 착수(한국환경공단)             : ’20. 6.

○ 총사업비 변경 및 사업기간 연장 협의 완료(기재부)        : ’20. 9.

□ 금후계획

○ 기본 및 실시설계용역 추진(한국환경공단)   : ’20. 6. ~ ’22. 7.

○ 공사 계약 및 착공(한국환경공단)           : ’22. 8.

○ 공사 추진(한국환경공단)                   : ’22. 9.∼ ’24. 12.

하수정비팀

농촌마을 환경개선 하수도 정비사업

○ 농촌마을에 오수관을 설치하여 생활오수를 깨끗이 처리함으로써

주민들의 삶의 질 향상 및 새만금 상류지역 수질개선 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2005년 ∼ 2023년 (17년간)

○ 위    치 : 관내 농촌마을 일원 (21개 지구, 41개 마을)

○ 총사업비 : 51,814백만원 (국비 70%, 시비 25%, 기금 5%)

○ 사업규모 : 21개 지구 (처리시설 700㎥/일, 관로 85.4km)

□ 추진상황

○ 2019년까지 완료(71%, 25,145백만원) : 15개지구

- 9개 지구(처리시설 540㎥/일 관로 50.6km), 6개 지구 연계처리

○ 2020년 사업시행(29%, 26,669백만원) : 6개지구

- 처리시설 160㎥/일, 관로 34.0km

※ 현재 추진중인 사업내역                                    (단위 : km, 백만원)

사 업 명		사업규모	총투자 규모	기투자액	2020년	2021년 이후	비 고 (추진실적/계획)
총 계		34.0km Q=160㎥/일	26,669	18,939	2,923	4,807
계속 사업 (2014. ~ 2021.)	수곡지구 (우아동)	8.2	4,915	4,915	-	-	• 공사완료(2020. 4월 완료) • 공 정 : 100%
	화신지구 (조촌동)	9.6 (Q=95㎥/일)	6,563	4,624	1,939	-	• 공사중(2021.8월 완료예정) • 공 정 : 81%
	원동지구 (조촌동)	2.8	2,244	2,236	8	-	• 공사중(2021.5월 완료예정) • 공 정 : 85%
	구원지구 (조촌동)	3.2	3,637	2,834	803	-	• 공사중(2021.5월 완료예정) • 공 정 : 72%
계속 사업 (2018. ~ 2023.)	신기지구 (조촌동)	3.0 (Q=65㎥/일)	3,616	1,601	65	1,950	• 설계용역완료(2020.11월) • 공사 발주 : 2020.12.
	전당, 아중.용계지구 (전미동 등)	7.2	5,694	2,729	108	2,857	• 공사중(2023.8월 완료예정) • 공사 착수 : 2020. 7. • 공 정 : 5%

□ 금후계획

○ 사업추진(계속 5개 사업)                  : ’20. 11. ∼ ’23. 12.

지하수관리팀

체계적인 지하수 관리로 하수도 자주재원 확충

○ 지하수시설에 대한 체계적인 관리 강화로 적정한 지하수 개발․

이용을 도모하고 수질오염 예방 및 물 자주재원 확충에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2020. 1. ∼ 12.

○ 세원발굴 목표액 : 300백만원

- 2019년 부과액 12,741백만원 → 2020년 부과예상액 12,000백만원

※ 코로나19로 지하수 사용업체 매출 급감으로 하수도사용액 감소예상

○ 지하수시설 등록현황 (2020. 6. 30일 기준)

(단위 : 개소)

총 계	생 활 용 수			농업용수	공업용수
	소 계	음용수	비음용수
5,981	3,369	229	3,140	2,555	57

○ 사업내용

- 하수도사용료 부과대상 조사 및 계량기 설치․고장 여부 조사

- 미신고․허가 지하수 시설 발굴 및 시설물 실태 파악

- 지하수시설 불용공, 미사용, 행불, 고장, 방치 여부 조사 등

-『지하수통합 정보관리시스템』운영 활성화

□ 추진상황

○ 지하수 공인유량계 신설 및 교체(상반기 115개소)

○ 검침곤란 시설 옥외검침시스템 유지보수(671개소)

○ 지하수시설 이용실태 현장조사(상반기 286개소/하반기 336개소)

- 계량기 미부착 가구 공인유량계 설치, 방치공 처리안내 등

○ 지하수 보조관측망 설치 및 운영 :  4개 설치 후 16개소 운영

□ 금후계획

○ 지하수 의심사용가·다량사용가에 대한 지속적 점검 관리

○ 공인유량계 신설·교체 및 옥외검침시스템 사후 유지관리

지하수관리팀

빗물이용시설 설치 지원 및 운영관리

○ 빗물이용시설의 이용 활성화로 친환경 수자원 확보를 통한 물 순환

체계 회복 및 가뭄·폭염 등 기후변화 대응으로 환경적 가치 실현

□ 시설현황

○ 빗물이용시설 구축 : 310개소 (예산지원 236, 비지원 74) 24,994㎥

- 공공기관 47, 교육(보육)기관 54, 공동주택 72, 일반주택 126, 기타 11

○ 설치비 지원 (2010년∼2019년) : 236개소 1,522백만원(2,596㎥)

구 분	국비 지원사업	자체사업	비예산사업
사 업 명	빗물이용 시범마을 조성	공공시설물 빗물이용시설 설치	공동주택 등 대형 건축물 빗물이용시설 설치(홍보·안내)
사업내용	팔복동 새뜰마을 빗물시범마을 빗물정원 1식 조성	11개소 (빗물이용시설 7, 빗물분수시설 4)
예 산	43.9백만원	431백만원

□ 주요사업

□ 추진상황

○ 공공시설물 빗물이용시설 사업대상지 선정 완료 : ’20. 6. 25.

- 빗물저장시설 7개소(완산·금암·인후·송천도서관, 인후3동, 덕진·금암노인복지관)

- 빗물분수시설 4개소(꽃심·효자·송천도서관, 금암노인복지관)

- 실시설계용역 완료 및 공사추진                   : ’20. 11.∼

○ 서학예술촌 빗물시범마을의 온두레마을공동체 선정에 따른 주민협의회

재구성(’20. 6. 16.) 및 시설 유지관리 ·교육 등 2회 실시

- 빗물이용시설 32개소, 빗물정원(공동체험시설) 1식 홍보 및 유지관리 활동

○ 팔복동 새뜰마을 빗물시범마을 빗물정원 조성사업 완료      :  ’20. 6. ∼  9.

- 빗물정원(공동체험시설) 70㎡ 1식 및 빗물이용시설 39개소 65㎥

○ 빗물이용시설 사용실태 조사 및 점검 실시(310개소)         : ’20. 10. ∼  11.

□ 금후계획

○ 공공시설물 빗물이용시설 실시설계용역 완료 및 공사추진 : ’20. 11.∼

○ 팔복동 새뜰마을 빗물시범마을 주민협의회 빗물이용시설 관리교육   : ’20. 11.∼

○ 빗물이용시설 수질모니터링(생활용수 20개항목) 실시  : 5개소 표본선정