제388회 전주시의회 임시회 복 지 환 경 위 원 회

2022년도

주요업무계획

맑은물사업본부

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진계획
	○	수 도 행 정 과	-------	5
	○	급 수 과	-------	10
	○	수 질 관 리 과	-------	17
	○	하 수 과	-------	23

일  반  현  황

□ 기   구 : 4과 14팀

									맑은물사업본부
	수도행정과 (4팀)							급 수 과 (3팀)								수질관리과 (3팀)								하 수 과 (4팀)
	수도정책							맑은물공급								수질관리								하수정책
	수도요금							급수시설								수질분석								하수시설
	체납징수							누수방지								시설관리								하수정비
	계량기관리																							지하수관리

※ 서신통합센터, 누수신고센터, 계량기시험소, 사업장 15개소(취수장 1, 배수지 10, 정수장 1, 가압장 3)

□ 정‧현원

과 별		총 계	일 반 직						연구사
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	84	1	4	22	28	16	10	3
	현 원	80	1	4	26	21	11	15	3
수도행정과	정 원	22	1	1	5	8	5	2
	현 원	22	1	1	6	10	2	2
급 수 과	정 원	17		1	4	7	2	3
	현 원	15		1	4	3	4	3
수질관리과	정 원	29		1	8	9	6	2	3
	현 원	28		1	12	5	2	5	3
하 수 과	정 원	16		1	5	4	3	3
	현 원	15		1	4	3	3	4

※ 공무직 35명 (수도행정과 19, 급수과 12, 수질관리과 2, 하수과 2), 청경 1명(수질관리과)

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
수도행정과	○ 맑은물사업본부 운영 총괄 ○ 상수도공기업 특별회계 운영 ○ 공사 및 용역 계약, 물품관리 ○ 상수도요금 조정 및 관련조례 제․개정 ○ 검침업무 운영 및 관리 ○ 상하수도요금 과징업무 전반 ○ 급수중지․개전․폐전에 따른 계량기 관리 ○ 고장․노후계량기 교체관리 ○ 계량기시험소 운영관리
급 수 과	○ 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 ○ 상수도 중장기계획 수립․시행 ○ 비상급수계획 및 대책수립 총괄 ○ 급수공사, 상수도 증설 및 확장공사 ○ 간이상수도 유지관리업무 ○ 누수탐사 및 누수복구업무, 누수방지대책 수립 ○ 누수신고센터 운영관리
수질관리과	○ 생활용수 공급 및 공업용수 생산․공급 ○ 광역상수도 수요에 따른 수급조절 및 관리 ○ 각 사업장 구축물․건물 유지보수 및 안전관리 ○ 국가공인수질검사기관 적정운영 및 정도관리 ○ 먹는물 공동시설(약수터) 및 간이상수도 수질검사 ○ 상수도 원․정수 수질관리 및 보전 ○ 상수원보호구역 관리
하 수 과	○ 하수도정비 기본계획(변경) 수립 ○ 하수도공기업 특별회계 운영 ○ 하수관로 정비사업 ○ 하수관로정비 민간투자(BTL)사업 유지관리 ○ 마을하수도 시설 및 유지관리 ○ 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리 ○ 효율적인 지하수 및 빗물이용 관리

기  본  현  황

(2021. 12.  31일 기준)

□ 급수현황

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전 (개)	유수율 (%)	급수량(천㎥/일)
						계	생활 용수	공업 용수
666,248	664,433	99.7	332	240,079	79.9	268	233	35

□ 상수도관

(단위 : ㎞)

총 연 장	도․송수관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,484	75	867.1	1,512

□ 상수원 보호구역

구 분	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎡)	상류(m)	하류(m)		안내판	표주
방수리	284,775	1,000	500	’72. 5. 5.	8	26

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

□ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	하수인구 보급율 (%)
계		71.63	2,335	1,951	98.6
합 류 식			0	341
분류식	소 계	71.63	2,335	1,610
	오수관거		1,108	725
	우수관거		1,227	885

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	환기구 (개소)	우수토실 (개소)
계	88.9	1,010	73	251
전주천 (좌, 우안)	25.3	369	37	142
삼 천 (좌, 우안)	12.3	155	18	45
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	9	38
아 중 선	12.0	174	4	16
팔복선(공장,생활)	16.9	183	5	8
상 관 선	10.4	47		2
기타(구화천,태평로, 연화천,덕적천,중복천)	7.6

□ 하수․위생처리 시설

구 분	환 경 사 업 소	수 질 복 원 센 터
위 치	전주시 덕진구 고내천변로 58	전주시 덕진구 중동로 150
면 적	320,990㎡	30,182㎡
시설규모 (처리용량)	규 모 : 403,000㎥/일 - 1단계 : 113,000㎥ (1990년) - 2단계 : 190,000㎥ (1997년) - 3단계 : 100,000㎥ (2005년)	규 모 : 16,500㎥/일 (2015년)
부대시설	° 위생처리장(290㎘/일) : 2002년 ° 총인처리시설(403,000㎥/일) : 2015년 ° CSOs처리시설(100,000㎥/일) : 2015년

수도행정과 소관

□	체계적인 자료정비를 통한 상·하수도 요금부과	----	6
□	상·하수도요금 전자고지(문자·이메일) 감면	----	7
□	상·하수도 요금 체납 징수율 향상	----	8
□	노후 및 고장계량기 교체사업	----	9

수도요금팀

체계적인 자료정비를 통한 상·하수도 요금부과

○  수도계량기 검침설비 구축·관리와 수용가 부과자료의 철저한 정비로

정확한 상·하수도 요금부과를 통한 신뢰받는 상수도 행정구현

□ 사업개요

○ 검침전수 : 241,717전 (일반주택 81,684, 공동주택 160,003, 산업용 30)

○ 검 침 원 : 169명 (일반주택 69 ,공동주택 100)

○ 요금부과 : 가정용 20㎥이하, 1t기준

- 2,290원/㎥ (상수도 720, 하수도 400, 물이용부담금 170, 구경별정액요금 1,000)    ○ 부과현황(2021. 12. 31 기준)

(단위 : 백만원 / 건)

구 분	합 계	가정용	일반용	대중탕용	산업용
계	104,713 571만	62,151 507만	37,393 63만	395 1,432	4,772 1,387
상수도	62,738 289만	40,639 256만	18,829 32만	236 752	3,033 396
하수도	41,975 282만	21,512 251만	18,564 31만	159 680	1,739 991

※ 월 평균 부과액 : 8,726백만원( 2021. 12. 31 기준 )

□ 금후계획

○ 요금 및 검침관련 직원, 검침원 직무교육 강화         : 월 1회

○ 다량 급수업소 일제점검 실시                         : 년 2회

- 일반용 300㎥ 이상, 대중탕용 1,500㎥ 이상 사용자에 대하여

연초 대상 선정 후 분기별 지속적인 누적관리

○ 0톤 수용가 일제조사 실시                           : 년 1회

- 일반용 300㎥ 이상, 대중탕용 1,500㎥ 이상 사용자에 대하여

○ 검침원 정례 검침후 확인자료의 지속적인 관리       : 월 1회

- 업종변경, 수도계량기 고장, 누수통보 등

수도요금팀

상·하수도 요금 전자고지(문자·이메일) 감면

○ 코로나19로 인하여 비대면 모바일 서비스에 대한 수요가 급증하여

연간 288만여건의 종이고지서로 인한 각종 비용을 절약 및 탄소배출 절감 선순환을 위하여 전자고지 신청자들에 대한 요금 감면

□ 사업개요

○ 기    간 : 2022. 1. ∼ 12.

○ 대    상 : 요금 자동납부 수용가(약 120,000전, 전체수용가의 약 50%)

○ 사업내용 : 신청자에 한해 종이 대신 문자/이메일 고지서발송(월 200원 할인)

○ 감 면 액 : 105,722천원(200원 × 44,051건 × 12월)

- 21. 12월말 신청현황 : 문자고지 42,841건, 이메일고지 1,210건

○ 절 감 액 : 26,430천원* (종이고지서 1장당 약50원 × 44,051건 × 12월)

□ 추진상황

○ 「전주시 상하수도 급수 조례 시행규칙」개정안 공포 : ’21. 10. 15

- 내용 : 상하수도요금 전자고지 신청시 수도요금 월200원 감면

□ 문제점 및 대책

○ 수도요금 고지서 오배송·분실로 인한 개인정보 유출우려가

적고 친환경적인 전자고지서 신청 및 요금감면 신청유도 필요

□ 검침원, 시내버스정거장 BIS, 홍보전단 및 직접적인 전화홍보 등 가용가능한 자원 최대한 활용하여 적극 홍보

□ 금후계획

○ 전자고지 신청 홍보                               : 연  중

체납징수팀

상·하수도 체납요금 징수율 향상

○ 체납자에 대한 상시독려, 단수예고, 정수처분을 통한 체납요금 조기징수와

자진 납부의식 제고 및 상습·고액체납자 징수강화로 안정적인 세입확보

□ 과징현황 (2021. 12. 31. 기준)

(단위 : 백만원)

구 분		조정액	징수액	결 손	체납액	징수율(%)
합 계		117,589	115,460	26	2,103	98.19
상수도	계	64,159	62,965	16	1,178	98.14
	현년도	62,927	61,922	4	1,001	98.40
	과년도	1,232	1,043	12	177	84.66
하수도	계	53,430	52,495	10	925	98.25
	현년도	52,435	51,681	3	751	98.56
	과년도	995	814	7	174	81.81

□ 징수목표

○ 총 징수율 목표 : 98.3% (현년도 98.4%, 과년도 83.2%)

○ 체납액 징수목표 : 전년도 체납액의 70% (15억원)

□ 금후계획

○ 체납단수반 운영 : 10개월 (3월 ∼12월)

- 단 수 반 : 3개반 6명 (기간제 단수요원 4명 투입)

- 대    상 : 체납액 2건 이상 또는 5만원 이상 체납수용가

○ 상‧하수도 사용료 체납 안내문 발송 : 월 1회

- 정수처분 대상 수용가에 대한 납부 안내문 우편발송 및 단수 계고장 교부

○ 체납요금 특별징수기간 운영 : 연 3회(5월, 9월, 12월)

○ 지역담당책임 납부독려(3개반 6명, 기간제 단수요원 포함)

○ 상습·고액 체납자 채권확보 강화

- 부동산, 예금, 매출채권 등 각종 재산압류 및 공매·추심

○ 체납요금 조기납부 홍보활동

- 홈페이지 안내사항 게시, 다량수용가·공동주택 홍보 등

계량기관리팀

노후 및 고장계량기 교체 사업

○ 유효기간 만기 및 노후 고장 수도계량기를 지속적으로 교체하여      상수도 사용료의 신뢰성을 높이고 수용가에 양질의 서비스 제공

□ 사업개요

○ 사 업 비 : 2,368백만원(구입비 1,118, 교체비 1,250)

○ 사업대상 : 35,000전(유효기간 만기 및 고장, 동파 계량기 등)

○ 관련법규 : 계량에 관한 법률 시행령 제21조(검정·재검정의 유효기간)

※ 검정유효기간 : 계량기구경 50mm이하(8년), 50mm초과(6년)

□ 추진상황

○ 최근 3년 계량기교체 추진실적

(단위 : 천원)

구 분		계	2019년	2020년	2021년	비고
사 업 비		5,333,936	1,453,308	1,937,208	1,943,420
교체실적	계	71,566	26,259	23,909	21,398
	유효만기	59,620	23,021	21,820	14,779
	고장 및 동파	11,946	3,238	2,089	6,619

□ 금후계획

○ 계량기 교체 공사 : 5회/년 실시(단가계약 27,000개소, 자체 8,000개소)

- 1차 ∼ 4차 교체공사(유효만기)          : ’22.  3. ∼ ’22. 11.

- 5차 교체공사(유효만기 및 동파)         : ’22. 12. ∼ ’23.  2.

○ 계량기 조달구입 : 29,000개 정도(상반기 5회, 하반기 4회)

※ 계량기 잔여분 재고수량 6,000개(2021. 12. 31.)

급 수 과  소 관

□	맑은물공급사업(노후 상수관망 정비) 2단계	----	11
□	지방상수도 현대화 사업	----	12
□	소규모 배수관 포설공사	----	13
□	대성배수지 이설공사	----	14
□	공동주택 등 노후 급수설비 지원사업	----	15
□	스마트 관망관리 인프라 구축사업	----	16

맑은물공급팀

맑은물공급사업(노후 상수관망 정비) 2단계

○ 유수율 85%이상 향상으로 선진화된 급수체계 구축과 맑고 깨끗한      수돗물을 공급함으로써 상수도 경영합리화 및 시민이 직접 느낄 수      있는 상수도 수질개선 도모

□ 사업개요

○ 사업위치 : 서신동 등 18개 블록 (1차 7, 2차 6, 3차 5)

○ 사업규모 : 노후관로 교체(L=121km) 및 블록시스템 구축

○ 총사업비 : 47,955백만원('21년까지 42,242, '22년 5,713)

○ 사업기간 : 2017. ∼ 2022.(6개년)

□ 추진상황

(단위 : 백만원)

구분		연도	블록 (개)	연장 (km)	사업비	사업 위치	비고
계			68	776	209,155
1단계		’09. ~ ’16.	50	655	161,200	중앙동, 노송동 등 15개 동	완료
2 단 계	소계		18	121	47,955
	1차	’17. ~ ’19.	7	36	11,835	효자동, 삼천동 일부	완료
	2차	’18. ~ ’20.	6	26	11,490	우아동, 금암동, 호성동 일부	완료
	3차	’20. ~ ’22.	5	59	24,630	서신동, 중화산동 일부	추진중

□ 금후계획

○ 맑은물공급사업 2단계 3차분 공사 추진(공정 77%)       : ’20. 4. ∼ ’22. 10.

○ 2단계 잔여분(4∼8차, 60개 블록) 추진계획 수립 : '22. 2. ∼’22. 4.

○ 2단계 4차 정비사업 기본 및 실시설계 추진        : '22. 7. ∼ ’22. 12.

○ 2단계 4차 정비사업 추진(지방상수도 현대화사업과 연계)    : '23. 3. ∼ ’24. 12.

맑은물공급팀

지방상수도 현대화 사업

○ 노후 상수관망 정비로 누수 저감 및 수돗물 신뢰도를 제고하고,

체계적․효율적 관망관리체계 구축으로 안정적인 수돗물 공급

※ 인천 수돗물 사건 : 붉은 수돗물(’19. 5월), 수돗물 유충사태(’20. 7월)

□ 사업개요

○ 사업대상 : 3개 급수구역(금암 1, 인후 2)

○ 사업내용

- 노후 상수관로 정비(L=275km, 목표유수율 85% 이상)

- 블록시스템 구축 1식, 유지관리시스템 구축 1식

○ 총 사 업 비 : 484억원(국비253억, 도비48억, 시비183억)

- ’21년까지(178억) : 국비(99억)  도비(18억) 시비(61억)

- ’22년도(131억) : 국비(66억)  도비(13억) 시비(52억)

※’23~24년(175억) : 국비(88억)  도비(17억) 시비(70억)

○ 사업기간 : 2020. ∼ 2024.(5개년)

□ 추진상황

○ 노후 상수도 개량 국고지원 결정(환경부)              : ’19. 9.

○ 위·수탁사항 협의 및 협약체결(한국수자원공사)       : ’19. 12.

○ 금암급수구역 우선사업대상지 선정 및 조사(환경부 협의) : ’20. 6.

※  사업대상지 요건 : 유수율 70% 미만 급수구역, 국고 未수혜 구역

○ 기본 및 실시설계 용역 추진(수자원공사 위탁시행)  : ’20. 9. ∼ ’22. 9.

- 유지관리시스템 : 상수관망 모니터링 (유량/ 수압/수질 등) 시스템 정비

- 블록시스템 : 블록고립 확인, 수용가 및 유량계 등 현장조사

- 관망정비 : 배․급수관, 밸브류 등 시설물 점검

○ 기본 및 실시설계용역 추진(2차년도)           : ’21. 9. ∼ ’22. 9.

□ 금후계획

○ 환경부 사전기술검토(사업 대상지 및 사업비 확정)      : ’21. 12. ∼ ’22. 5.

○ 행정절차 이행(설계 VE, 기술심의, 일상감사 등)        : ’22. 3. ∼ ’22. 6.

○ 지방상수도 현대화사업 공사 추진                    : ’22. 7. ∼  ’24. 12.

급수시설팀

소규모 배수관 포설공사

○ 농촌지역 등 시 외곽 배수관 미 포설지역 및 개발행위 등 신규 수요가 발생하는 지역에 상수도를 공급하여 시민불편 해소 및 보건위생 향상 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내 (전미중앙로, 추천로 외 4개소)

○ 사업규모 : 상수관로(D50∼200㎜, L=2.8㎞) 포설

○ 총사업비 : 619백만원(본예산 600, 명시이월 19)

○ 사업기간 : 2022. 1. ∼ 12.

□ 세부사업 내용(상반기) : L=1,99㎞, 535백만원

○ 팔복동3가 27 일원 배수관 포설

(D80~100mm, L =420m, 110백만원)

○ 전미동2가 1213-4 일원 배수관 포설

(D100mm, L=420m, 105백만원)

○ 반월동 30-7 일원 관말 연결

(D80mm, L=410m, 100백만원)

○ 평화동2가 828 일원 관말 연결

(D50~100mm, L=310m, 90백만원)

○ 보훈공원 인근 관경확대 (D80→D150, D150→D200)

(D150~200mm, L=425m, 130백만원)

□ 추진상황

○ 실시설계 용역 착수(착공일로부터 50일)       : ’22. 1.

□ 금후계획

○ 실시설계 완료 및 공사 추진(상반기)          : ’22. 2. ∼’22. 7.

○ 하반기 사업대상지 조사 설계                : ’22. 2. ∼’22. 7.

○ 하반기 공사 추진                           : ’22. 8. ∼’22 12.

급수시설팀

대성배수지 이설공사

○ 전북중소벤처기업 연수원 부지 활용과 배수지 노후에 따른 기존 배수지를 부지 내 여유공간으로 이설하여 대성 급수구역의 안정적인 용수공급 도모를 위함

□ 사업개요

○ 위    치 : 대성 배수지 일원(대성동 479-1 일원)

○ 사업내용 : 기존 시설물 철거(1,2배수지, 여과지 등) 1식, 배수지 이설 1식

○ 사업규모 : 기존 배수지 철거(V=8,600㎥), 배수지 이설(V=10,000㎥)

○ 총사업비 : 12,000백만원(’22년 5,000)

○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 12

□ 추진상황

○ 세부 추진계획 보고                         : ’21. 12. 27.

○ 일상감사 및 계약심사 의뢰                  : ’22. 1. 4.

□ 금후계획

○ 기본 및 실시설계용역 발주, PQ 평가	: ’22. 3.

○ 환경부 사전 기술검토, 설계VE, 설계안전성  검토  : ’22. 4. ∼’22. 8.

○ 용역 준공 및 공사발주 사전절차 이행        : ’22. 9. ∼’22 10.

(기술심의,일상감사,계약심의 등)

○ 건설사업관리 용역 발주 및 PQ평가          : ’22. 9. ∼’22 10.

○ 공사 발주 및 착공                          : ’22. 11.

○ 공사 추진                                  : ’23. 1. ∼’23 12.

급수시설팀

공동주택 등 노후 급수설비 지원사업

○ 옥내 급수설비가 노후되어 수돗물 수질기준에 부적합한 공동주택 등에 노후 급수설비 개량사업비 일부를 지원하여 맑고 깨끗한 양질의 수돗물 공급

□ 사업개요

○ 지원근거 :『전주시 상수도 급수조례』제39조(급수설비의 관리 책임 등)

○ 지원대상 : 배관 내부 부식으로 수질기준을 초과하는 경우

○ 지원내용

- 85㎡이하 단독 및 공동주택 : 총공사비의 70% 이하(단독 1,000천원, 공동 50,000천원)

- 학교, 사회복지시설 : 총공사비의 70% 이하 (최대 20,000천원)

○ 사 업 비 : 84백만원

□ 추진실적(2015년 ∼ 2021년) : 44개소, 761,331천원

(공동주택 39, 학교시설 3, 사회복지 1, 주택1)

○ 2015년  : 11개소 (공동주택 10, 학교시설 1), 222,487천원

○ 2016년  : 11개소 (공동주택 10, 학교시설 1), 174,847천원

○ 2017년  :  2개소 (공동주택 1, 사회복지 1),  21,622천원

○ 2018년  :  8개소 (공동주택 7, 학교시설 1), 159,910천원

○ 2019년  :  5개소 (공동주택 5), 105,750천원

○ 2020년  :  4개소 (공동주택 4), 54,215천원

○ 2021년  :  3개소 (공동주택 2, 주택 1), 22,500천원

□ 금후계획

○ 급수설비 지원사업 홍보 및 접수           : ’22. 2. ∼

- 시 홈페이지, 전주소식지(전주다움), 일간신문, 대상지 우편발송 등

○ 지원대상자 선정 및 사업시행              : ’22. 2. ∼ ’22. 12.

누수방지팀

스마트 관망관리 인프라 구축사업

○ 2019년 5월 인천 붉은 수돗물 사태 이후 먹는 물 안전관리 강화를 위한 근본적 대책 수립이 필요하여 수돗물 공급 全 과정에 감시체계 인프라 구축

□ 사업개요

○ 사업내용

- (수질관리 및 감시시스템 구축) : 재염소설비, 자동드레인 등

- (사고발생시 위기대응 시스템 구축) : RF 관로인식체계 구축

- (원격검침 시스템 구축) : 원격지시부 1식, 스마트미터기 20,278전

○ 사 업 비 : 13,139백만원[국비(70%) 9,197, 시비(30%) 3,942]

- ’20년 : 9,700백만원(국 7,761, 시 1,939), ’21년 : 3,439백만원(국 1,436 시 2,003)

○ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 2022. 12.

□ 추진상황

○ 스마트 관망관리 인프라 구축 사업 확정통보(환경부)  : ’19. 10.

○ 수도정비 기본계획 변경 고시(시→도→환경부)        : ’20. 1.

○ 기본계획 수립(환경부)                           : ’20. 3. ∼ 10.

○ 스마트 관망관리 위·수탁 체결(한국수자원공사)      : ’20. 11.

○ 세부사업 계획 승인(환경부)                         : ’21. 6.

○ 스마트 관망관리 인프라 구축사업 기술별 발주(한국수자원공사) : ’21. 11.

□ 금후계획

○ 스마트 관망관리 기술별 시설공사 시행          : ’22. 3. ∼ 11.

○ 스마트 관망관리 인프라 구축사업 완료	: ’22. 12.

수질관리과  소관

□	어린이집 대상 찾아가는 수질검사 추진	----	18
□	깨끗하고 안전한 수돗물 공급 및 수질검사 강화	----	19
□	국가 공인 수질검사기관 효율적 운영	----	20
□	배수지 및 가압장 노후시설 교체공사	----	21
□	공업용수 노후 취수관 확충공사	----	22

수질분석팀

어린이집 대상 찾아가는 수질검사 추진

○ 면역력이 약하고 질병에 취약한 보육시설 어린이들이 수돗물을

안심하고 음용할 수 있도록 수질검사를 실시 불안감을 해소하고

안전성 검증으로 시민 만족도 향상

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. 1. ∼ 12.

○ 사업대상 : 469개소(관내 어린이집)

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 항목(10개 항목)

○ 내    용

- 수도꼭지 위생상태 점검 및 잔류염소 농도 확인 병행

- 깨끗하고 안전한 수돗물 홍보 및 수질이상 발생시 대처방안 안내

- 노인일자리를 활용하여 취약계층 건강편익을 위해 어린이집 대상으로          수돗물의 수질검사를 실시, 지역경제 활성화 및 깨끗한 수돗물

신뢰성 강화로 시민의 위생안전 확보

□ 금후계획

○ 수질검사 사전안내 및 수질검사 일정수립         : ’22. 2.

○ 월 100개소 이상 시료 채수 및 수도꼭지수 위생상태 점검  : ’22. 3. ∼ 12.

○ 수질검사결과 송부 및 수돗물에 대한 안전한 음용방법 컨설팅

- 수질 이상 발생 시 대처방안 안내

※ 홍보영상(애니메이션) 활용 수돗물 홍보교육 병행실시

수질분석팀

깨끗하고 안전한 수돗물공급 및 수질검사 강화

○ 과학적이고 체계적인 수질관리 및 현장행정으로 시민과 함께하는      검증 등 확인을 통한 상수도 수질안전성 확보

□ 사업개요

○ 원수 ∼ 수도꼭지수까지 공급단계별 수질검사 확대

구 분	법 적 기 준	강 화 시 행
원 수 (상수원관리규칙 제24조)	매월 COD 등 6개항목 매분기 수은 등 31개항목	매월 37개항목
정 수 (먹는물수질기준및검사등에 관한규칙 제 4조)	매일 탁도 등 6개항목 1회이상 매주 대장균 등 7개항목 매월 비소 등 59개항목	매일 6개항목 6회 매주 15개항목 매월 59개항목 분기 46개항목 추가 (분기별 105개 항목 검사)
수도꼭지수 (먹는물수질기준및검사등에 관한규칙 제 4조)	월 77개소 잔류염소 등 4개항목	월 100개소 잔류염소 등 4개항목

□ 추진상황

○ 용담호 및 고산정수장 매월 정밀검사(한국수자원공사, 전주시)

○ 수돗물 안심확인제(인터넷 접수) : 232세대 민원해결(시험성적서 배부)

○ 공동주택 방문 종합검사(건강한 수돗물 인증서 발급)

-  ’19년(156),  ’20년(154),  ’21년(157)

○ 노인세대 찾아가는 수질검사 추진 : 1,619세대

○ 수돗물 품질보고서 발간 : 210,000부(주민센터 배부, 홈페이지 공개)

□ 금후계획

○ 수돗물 안심확인제 지속추진 및 공동주택 수돗물 수질검사 실시

○ 어린이집 대상 찾아가는 수질검사 추진

수질분석팀

국가 공인 수질검사기관 효율적 운영

○ 수질검사 공인 검사기관의 효율적인 운영을 통하여 수돗물의

파수꾼 역할과 대시민 행정 서비스 강화

□ 사업개요

○ 공인 검사기관 공공성 및 신뢰성 확보를 위한 분석능력 제고

- ’21환경부 분석능력 평가 결과 국내 106개 기관중 우수기관 달성

○ 먹는물의 안전성 확보로 시민의 건강추구

- 수돗물, 약수터, 공원음수대, 수영장수, 목욕장수, 수경시설,

민방위 비상급수시설 등 안전성 조사

※ 운영인력 6명(환경연구사 2, 환경 3, 의료기술 1)

□ 추진상황

○ ’21 환경부 분석능력평가 결과 국내 최상위 기관 선정

※ 환경부 국립환경과학원『먹는물 수질검사기관 제33호』지정 - ’00. 7

○ 먹는물 및 생활속 물상태 철저한 검증추진

- 총 검사건수 : 5,219건(의뢰 1,477,  자체 3,742)

·상수원 정수(2,165), 상수도 원수(159), 상수도 노후관(265)

수돗물안심확인제(232), 공동주택 수돗물 인증제(157), 지하수(338)     먹는샘물(110), 약수터(25), 수영장수(55), 목욕장수(39),

수경시설(155), 노인거주세대(1,619)

□ 금후계획

○ 수질분석 능력 배양을 위한 자체 정도관리 강화

○ 현장방문 수질검사 서비스 강화를 통한 시민건강 증진

○ 연간 5,200여건 수질검사 의뢰 시료에 대한 신속한 처리

시설관리팀

배수지 및 가압장 노후시설 교체 공사

○ 노후시설 교체 등으로 상수도 시설의 노후화로 인해 발생될 수

있는 각종 안전사고를 사전에 예방 및 시설물 유지관리에 만전을

기하여 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. 1. ∼ 12.

○ 사업대상 : 15개소(배수지 10, 정수장 1, 취수장 1, 가압장 3)

○ 사 업 비 : 300백만원

○ 사업내용 : 배수지 및 가압장 노후시설 교체

- 송·배수관로 보수, 펌프·밸브·기계설비 등 교체 및 설치

□ 추진상황

○ 노후 시설 교체를 위한 현장조사                      : ’22. 2.

□ 금후계획

○ 실시설계용역 준공                                  : ’22. 3.

○ 공사착수                                           : ’22. 4.

○ 공사준공                                           : ’22. 12.

시설관리팀

공업용수 노후 취수관 확충 공사

○ 만경강 하천에 매설되어 있는 취수 유공관이 내부퇴적 및 노후화로

취수량 부족 우려가 있어 확충을 통한 안정적인 공업용수 확보

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. 1. ∼ 5.

○ 사업대상 : 전미취수장 앞 만경강

○ 사 업 비 : 779백만원(도급 452, 관급 327)

○ 사업내용 : 공업용수 취수관 설치(D=1,350mm, L=312m)등

□ 추진상황

○ 실시설계용역                            : ’20. 2. ∼ ’21. 12. 7.

○ 소규모 환경영향평가                     : ’21. 3. ∼ ’21. 11.

○ 하천점용허가(익산국토관리청)             : ’21. 2. ∼ ’21. 12.

○ 공사발주                                : ’21. 12.

□ 금후계획

○ 공사준공                               : ’22. 5.

하 수 과  소 관

□	생태도시 구현을 위한 하수관로 정비사업	----	24
□	팔복[3,5,6분구] 처리구역 하수관로 정비사업	----	25
□	전주 공공하수처리시설(4단계) 증설	----	26
□	농촌마을 환경개선 하수도 정비사업	----	27
□	체계적 지하수시설 조사로 물자원 관리강화	----	28

하수시설팀

생태도시 구현을 위한 하수관로 정비사업

○ 쾌적한 생태도시 구현과 새만금 상류 수질개선에 기여하고, 오염 부하량

저감 및 불명수 감소로 하수처리 경영 합리화

□ 사업개요

○ 위    치 : 7개 처리구역 36개분구, 6개 지구, 취락지역 54개 마을 등

○ 사업기간 : 2002년 ∼ 2035년 (34년간)

○ 사 업 비 : 8,957억원(국비 50%, 도비10%, 시비 35%, 기금 5%)

○ 사업규모 : 하수관로정비 1,015km, 배수설비 55,720개소

□ 추진상황

○ 2021년까지 완료(64%, 5,013억원) : 8개 구역

- 하수관로 정비 648.7km, 배수설비 36,066개소

○ 2022년 계속사업(22%, 2,804억원) : 7개 구역

- 하수관로 정비 218.1km, 배수설비 13,196개소

(단위 : km, 억원)

사 업 명		사업규모	총투자 규모	기투자액	2022년	2023년 이후	추진실적/계획
총 계		218.1	2,804	657	258	1,889
계 속 사 업 ︵ ’14 ~ ’26︶	팔복(1,2) : 팔복동	32.6	280	209	22	50	-공사 중( ’23.7월 완료) -공정률 30%
	중앙(9,10) : 중앙동, 풍남동, 노송동	33.7	498	158	41	299	-공사 중( ’25.3월.완료) -공정률 12%
	중앙(8) : 중앙, 풍남동	22.2	356	140	42	174	-공사중( ’24.7월.완료) -공정률 24%
	화산(1,2,7) : 완산, 서학, 삼천, 평화, 효자, 우아	33.5	496	94	71	331	-공사중( ’26.6월.완료) -공정률 5%
	중앙(6,7) : 중앙동, 진북동	41.4	496	39	62	395	-설계용역 중(’21.12.완료) -공사발주(’22.상반기)
	아중(2분구) 및 편입구역 : 호성동, 우아동	33.2	364	18	0	346	-설계용역 중(’23.6.완료) -공사발주(’23.하반기)
신규	팔복(3,5,6,분구) : 조촌동, 여의동	21.5	314	0	20	294	-설계발주(’22.상반기) -설계완료(’23.12. 완료)

□ 금후계획

○ 잔여 사업(14%, 1,140억원) 계속 추진 : ∼ ’35년 까지

- 하수관로 148.2km, 배수설비 6,458개소

하수시설팀

팔복[3,5,6분구] 처리구역 하수관로 정비사업

○ 조촌동, 여의동, 팔복동 일원의 하수관로 정비사업 추진으로 악취 저감 등 지역 주민 불편해소 및 주거환경 개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 조촌동, 여의동, 팔복동 일원

○ 사업기간 : 2022년 ∼ 2027년 (6년간)

○ 사 업 비 : 314억원(국비 50%, 도비10% 시비35%, 기금5%)

○ 사업규모 : 하수관로정비(우·오수 신설 및 개량) L=21.5km

※ 배수설비 936개소, 기타부대시설 1식

□ 추진상황

○ ’22년 신규 국고보조사업 신청	: ’21. 3

○ ’22년 신규사업 예산 확보(국비 5억, 지방비 15억)	: ’22. 1

□ 금후계획

○ 행정절차(계약심사, 일상감사, 원가심사 등) 이행	: ’22. 1. ∼ 4.

○ 기본 및 실시설계용역 발주 및 PQ평가	: ’22. 5. ∼ 6.

○ 기본 및 실시설계용역 착수 및 추진	: ’22. 7.∼’23. 12.

○ 재원협의 및 공공하수도설치인가 등 행정절차이행	: ’24. 1. ∼  5.

○ 공사 추진	: ’24. 6.∼’27. 12.

하수정비팀

전주 공공하수처리시설(4단계) 증설

○ 에코시티, 효천지구 택지개발 및 향후 도시개발에 따른 유입하수량

및 오염부하량 증가에 따른 공공하수처리시설 증설 필요

* 국무총리 주재 제16차 새만금위원회에서 새만금 목표수질 달성을 위한 추가 보완대책 발표(2015. 12. 4.)

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017년 ∼ 2024년 (8년간)

○ 위    치 : 덕진구 고내천변로 58일원(전주 환경사업소 내)

○ 사 업 비 : 794억원(국비 308, 도비 154, 시비 332)

○ 사업규모 : 증설용량 36,000㎥/일(403,000㎥/일 ⇨ 439,000㎥/일)

□ 추진상황

○ 하수도정비 기본계획 (변경)수립	: ’17. 3.

○ 사업계획 적정성 검토(공공투자관리센터)	: ’18. 10.

○ 위·수탁 협약체결(전주시⇔한국환경공단)	: ’19. 12.

○ 기본 및 실시설계용역 착수	: ’20. 6.

○ 공법선정 및 기본 실시설계 추진	: ’21. 10.

□ 금후계획

○ 기본 및 실시설계 용역 추진(한국환경공단)  : ’20. 6. ∼ ’22. 10.

○ 재원협의(환경부) 및 총사업비 조정(기재부)     : ’22. 11. ∼ ’23. 3.

○ 공사 계약 및 추진                          : ’23. 4. ∼ ’24. 12.

하수정비팀

농촌마을 환경개선 하수도 정비사업

○ 농촌마을에 오수관을 설치하여 생활오수를 깨끗이 처리함으로써

주민들의 삶의 질 향상 및 새만금 상류지역 수질개선 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 관내 농촌마을 일원

○ 사업기간 : 2005년 ∼ 2023년(19년간)

○ 사 업 비 : 51,814백만원(국비 70%, 시비 25%, 기금 5%)

○ 사업규모 : 21개 지구(처리시설 700㎥/일, 관로 84.6km)

□ 추진상황

○ 2021년까지 완료(77%, 35,941백만원)                : 18개지구

- 9개 소규모처리장(처리시설 540㎥/일, 관로 23.4km), 9개 연계처리(관로 41.4km)

○ 2022년 사업시행(23%, 15,873백만원)                : 3개지구

- 처리시설 160㎥/일, 관로 19.8km

(단위 : km, 백만원)

사 업 명		사업규모	총투자 규모	기투자액	2022년	2023년 이후	비 고 (추진실적/계획)
총 계		19.8km Q=160㎥/일	15,873	12,500	1.276	2,097
계속 사업 (2018. ~ 2023.)	화신지구 (조촌동)	9.6 (Q=95㎥/일)	6,563	6,563	0	0	•착 수 : 2018. 05. 28. •공 정 : 95% •공사중(2022.6월 완료예정)
	신기지구 (조촌동)	3.0 (Q=65㎥/일)	3,616	2,340	1.276	0	•착 수 : 2020. 12. 24. •공 정 : 50% •공사중(2023.3월 완료예정)
	전당, 아중. 용계지구 (전미동 등)	7.2	5,694	3,597	0	2,097	•착 수 : 2020. 07. 20. •공 정 : 48% •공사중(2023.12월 완료예정)

□ 금후계획

○ 사업추진(신규, 계속사업)                 : ’22. 2. ∼ ’23. 12.

지하수관리팀

체계적 지하수시설 조사로 물자원 관리강화

○ 지하수시설에 대한 체계적인 관리 강화로 적정한 지하수 개발․이용을 도모하고 수질오염 예방 및 물 부족 상황에 적극 대비

□ 주요현황

○ 지하수시설 등록현황 (2021. 12월 기준)

(단위 : 개소)

구 분	총 계	생활용수			농업용		공업용
		소계	음용수	비음용수
계	6,656	3,591	279	3,312	2,999	66
신 고	6,402	3,480	263	3,217	2,892	30
허 가	254	111	16	95	107	36

○ 주요업무

- 하수도사용료 부과대상 조사 및 계량기 설치․고장 여부 조사

- 미신고․허가 지하수시설 발굴 및 시설물 실태 파악

- 지하수시설 불용공, 미사용, 행불, 고장, 방치 여부 조사 등

-『지하수통합 정보관리시스템』운영 활성화

□ 추진상황

○ 지하수 공인유량계 신설 및 교체 (’21. 150개소)

○ 검침곤란 시설 옥외검침시스템 유지보수 (714개소)

○ 지하수시설 이용실태 현장조사 (’21. 724개소)

- 계량기 미부착 가구 공인유량계 설치, 방치공 처리안내 등

○ 지하수 보조관측망 설치 및 운영 : 총 20개소 운영(’22. 4개소 설치)

□ 금후계획

○ 지하수 의심 사용가·다량 사용가에 대한 지속적 점검 관리

○ 공인유량계 신설·교체 및 옥외검침시스템 사후 유지관리