제397회 전주시의회 제2차 정례회

2022년도 행정사무감사

복 지 환 경  위 원 회

2022년도

주요업무 추진상황 보고

상하수도본부

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진계획
	○	수 도 행 정 과	-------	5
	○	급 수 과	-------	10
	○	수 질 관 리 과	-------	17
	○	하 수 과	-------	25

일  반  현  황

□ 기   구 : 4과 14팀

									상하수도본부
	수도행정과 (4팀)							급 수 과 (3팀)								수질관리과 (3팀)								하 수 과 (4팀)
	수도정책							급수정책								수질관리								하수정책
	수도요금							급수시설								수질분석								하수시설
	체납징수							누수방지								시설관리								하수정비
	계량기관리																							지하수관리

※ 서신통합센터, 누수신고센터, 계량기시험소, 사업장 15개소(취수장 1, 배수지 10, 정수장 1, 가압장 3)

□ 정‧현원

과 별		총 계	일 반 직						연구사
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	84	1	4	22	28	16	10	3
	현 원	81	1	4	26	24	7	17	2
수도행정과	정 원	22	1	1	5	8	5	2
	현 원	22	1	1	6	10	2	2
급 수 과	정 원	17		1	4	7	2	3
	현 원	15		1	4	4	0	6
수질관리과	정 원	29		1	8	9	6	2	3
	현 원	28		1	12	7	2	4	2
하 수 과	정 원	16		1	5	4	3	3
	현 원	16		1	4	3	3	5

※ 공무직 35명 (수도행정과 19, 급수과 12, 수질관리과 2, 하수과 2), 청경 1명(수질관리과)

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
수도행정과	○ 상하수도본부 운영 총괄 ○ 상수도공기업 특별회계 운영 ○ 공사 및 용역 계약, 물품관리 ○ 상수도요금 조정 및 관련조례 제․개정 ○ 검침업무 운영 및 관리 ○ 상하수도요금 과징업무 전반 ○ 급수중지․개전․폐전에 따른 계량기 관리 ○ 고장․노후계량기 교체관리 ○ 계량기시험소 운영관리
급 수 과	○ 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 ○ 상수도 중장기계획 수립․시행 ○ 비상급수계획 및 대책수립 총괄 ○ 급수공사, 상수도 증설 및 확장공사 ○ 간이상수도 유지관리업무 ○ 누수탐사 및 누수복구업무, 누수방지대책 수립 ○ 누수신고센터 운영관리
수질관리과	○ 생활용수 공급 및 공업용수 생산․공급 ○ 광역상수도 수요에 따른 수급조절 및 관리 ○ 각 사업장 구축물․건물 유지보수 및 안전관리 ○ 국가공인수질검사기관 적정운영 및 정도관리 ○ 먹는물 공동시설(약수터) 및 간이상수도 수질검사 ○ 상수도 원․정수 수질관리 및 보전 ○ 상수원보호구역 관리
하 수 과	○ 하수도정비 기본계획(변경) 수립 ○ 하수도공기업 특별회계 운영 ○ 하수관로 정비사업 ○ 하수관로정비 민간투자(BTL)사업 유지관리 ○ 마을하수도 시설 및 유지관리 ○ 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리 ○ 효율적인 지하수 및 빗물이용 관리

기  본  현  황

(2022. 9.  30일 기준)

□ 급수현황

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전 (개)	유수율 (%)	급수량(천㎥/일)
						계	생활 용수	공업 용수
662,187	661,524	99.9	416	242,040	79.7	277	241	36

□ 상수도관

(단위 : ㎞)

총 연 장	도․송수관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,601	77	948	1,576

□ 상수원 보호구역

구 분	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎡)	상류(m)	하류(m)		안내판	표주
방수리	284,775	1,000	500	’72. 5. 5.	8	26

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

□ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	하수인구 보급율 (%)
계		71.63	2,335	1,951	98.6
합 류 식			0	341
분류식	소 계	71.63	2,335	1,610
	오수관거		1,108	725
	우수관거		1,227	885

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	환기구 (개소)	우수토실 (개소)
계	88.9	1,010	73	251
전주천 (좌, 우안)	25.3	369	37	142
삼 천 (좌, 우안)	12.3	155	18	45
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	9	38
아 중 선	12.0	174	4	16
팔복선(공장,생활)	16.9	183	5	8
상 관 선	10.4	47		2
기타(구화천,태평로, 연화천,덕적천,중복천)	7.6

□ 하수․위생처리 시설

구 분	환 경 사 업 소	수 질 복 원 센 터
위 치	전주시 덕진구 고내천변로 58	전주시 덕진구 중동로 150
면 적	320,990㎡	30,182㎡
시설규모 (처리용량)	규 모 : 403,000㎥/일 - 1단계 : 113,000㎥ (1990년) - 2단계 : 190,000㎥ (1997년) - 3단계 : 100,000㎥ (2005년)	규 모 : 16,500㎥/일 (2015년)
부대시설	° 위생처리장(290㎘/일) : 2002년 ° 총인처리시설(403,000㎥/일) : 2015년 ° CSOs처리시설(100,000㎥/일) : 2015년

수도행정과 소관

□	체계적인 자료정비를 통한 상·하수도 요금부과	----	6
□	상·하수도요금 전자고지(문자·이메일) 감면	----	7
□	상·하수도 요금 체납 징수율 향상	----	8
□	노후 및 고장계량기 교체사업	----	9

수도요금팀

체계적인 자료정비를 통한 상·하수도 요금부과

○  수도계량기 검침설비 구축·관리와 수용가 부과자료의 철저한 정비로

정확한 상·하수도 요금부과를 통한 신뢰받는 상수도 행정구현

□ 사업개요

○ 검침전수 : 242,040전 (일반주택 82,162, 공동주택 159,845, 산업용 33)

○ 검 침 원 : 169명 (일반주택 69, 공동주택 100)

○ 요금부과 : 가정용 20㎥이하, 1t기준

- 2,290원/㎥ (상수도 720, 하수도 400, 물이용부담금 170, 구경별정액요금 1,000)    ○ 부과현황 (2022. 10. 31 기준)

(단위 : 건 / 백만원)

구 분	합 계	가정용	일반용	대중탕용	산업용
계	4,785,998 94,953	4,245,265 49,865	538,421 39,180	1,177 399	1,135 5,518
상수도	2,419,879 56,278	2,143,754 32,629	275,176 19,869	619 239	330 3,550
하수도	2,366,119 38,675	2,101,511 17,236	263,245 19,311	558 160	805 1,968

※ 월 평균 부과액 : 9,295백만원(2022. 10. 31 기준 )

□ 추진상황

○ 상반기 다량 급수업소 일제점검 실시            : ’22. 4. 8. ∼ 25.

- 일반용 300㎥ 이상, 대중탕용 1,500㎥ 이상 사용자 대상

○ 0톤 수용가 일제조사 실시                     : ’22. 9. 6. ∼ 30.

- 6개월 이상 사용량이 없는 약 6,000여 수용가 대상

□ 금후계획

○ 하반기 다량 급수업소 일제점검 실시             : ’22. 11월중

○ 요금 및 검침관련 직원, 검침원 직무교육 강화     : 월 1회

○ 검침원 정례 검침후 확인자료의 지속적인 관리  : 월 1회

- 업종변경, 수도계량기 고장, 누수통보 등

○ 일정기간이 도래한 검침원간 검침구역 교체로 검침태만 방지 : 상시

수도요금팀

상·하수도 요금 전자고지(문자·이메일) 감면

○ 코로나19로 인하여 비대면 모바일 서비스에 대한 수요가 급증하여

연간 288만여건의 종이고지서로 인한 각종 비용을 절약 및 탄소배출 절감 선순환을 위하여 전자고지 신청자들에 대한 요금 감면

□ 사업개요

○ 기    간 : 2022. 1. ∼ 12.

○ 대    상 : 요금 자동납부 수용가(약 120,000전, 전체수용가의 약 50%)

○ 사업내용 : 신청자에 한해 종이 대신 문자/이메일 고지서발송(월 200원 할인)

□ 추진상황

○ 「전주시 상하수도 급수 조례 시행규칙」개정안 공포 : ’21. 10. 15

- 내용 : 상하수도요금 전자고지 신청시 수도요금 월200원 감면

○ 감 면 액 : 94,704천원(200원 × 47,352건 × 10월)

- 22. 10월말 신청현황 : 문자고지 46,021건, 이메일고지 1,331건

○ 절 감 액 : 23,676천원* (종이고지서 1장당 약50원 × 44,051건 × 12월)

□ 필요성 및 대책

○ 수도요금 고지서 오배송·분실로 인한 개인정보 유출 우려가

적은 친환경적인 전자고지서 신청 및 요금감면 신청유도 필요

□ 검침원, 시내버스정거장 BIS, 홍보전단 및 직접적인 전화홍보 등 가용가능한 자원 최대한 활용하여 적극 홍보

□ 금후계획

○ 전자고지 신청 홍보                               : 연  중

체납징수팀

상·하수도 체납요금 징수율 향상

○ 체납자에 대한 독려, 단수계고, 정수처분을 통한 체납요금 조기징수와

납부의식 제고 및 상습·고액체납자 징수강화로 안정적인 세입확보

□ 과징현황 (2022. 10. 31. 기준)

(단위 : 백만원)

구 분		조정액	징수액	결 손	체납액	징수율(%)
합 계		106,295	103,964	13	2,318	97.81
상수도	계	57,613	56,346	10	1,257	97.80
	현년도	56,426	55,365	0	1,061	98.12
	과년도	1,187	981	10	196	82.65
하수도	계	48,682	47,618	3	1,061	97.81
	현년도	47,752	46,888	0	864	98.19
	과년도	930	730	3	197	78.51

※ 전년 동기대비 부과액 100억↑, 징수액 99억↑, 체납액 1억↑, 징수율 0.1%p↑

(’21.10월말 : 부과액 96,233백만원, 징수액 94,026만원, 체납액 2,207백만원, 징수율 97.71%)

□ 추진상황

○ 체납 상하수도사용료 특별징수기간 운영 : 2회 (4~5월, 8~9월)

- 징수액 2,680백만원 (목표 2,044백만원 대비 131.1%)

○ 체납수용가 안내문 발송 및 단수계고 : 32,770전 8,815백만원

○ 정수(단수)처분 및 개전 : 2회 이상 8만원 이상 체납수용가 계고

- 단수 1,599전 15,323건 516백만원 / 개전 1,469전 12,452건 415백만원

○ 상습·고액체납자 재산조회 및 압류 추진 : 11전 136건 118백만원

□ 금후계획

○ 체납단수반 운영 : 10개월 (3~12월)

- 지역담당 현장방문 및 전화 독려(3개반 8명, 기간제 단수요원 포함)

○ 상‧하수도사용료 체납내역 안내 : 우편발송(월1회) / 단수계고(매일)

○ ’22년 회계마무리 체납 상하수도사용료 특별징수기간 운영 : 1회 (11~12월)

○ 상습·고액 체납자 재산조회 및 압류 등 체납처분으로 채권 확보

계량기관리팀

노후 및 고장계량기 교체 사업

○ 유효기간 만기 및 노후 고장 수도계량기를 지속적으로 교체하여      상수도 사용료의 신뢰성을 높이고 수용가에 양질의 서비스 제공

□ 사업개요

○ 사 업 비 : 2,368백만원(구입비 1,118, 교체비 1,250)

○ 사업대상 : 35,000전(유효기간 만기 및 고장, 동파 계량기 등)

※ 전주시 관리 계량기 총 전수 : 245,939전 (’22.10.31.현재)

○ 관련법규 : 계량에 관한 법률 시행령 제21조(검정·재검정의 유효기간)

※ 검정유효기간 : 계량기구경 50mm이하(8년), 50mm초과(6년)

□ 추진상황

○ 최근 3년 계량기교체 추진실적

(단위 : 천원)

구 분		계	2020년	2021년	2022년(10.31.)	비고
사 업 비		6,249,263	1,937,208	1,943,420	2,368,635
교체실적	계	62,271	23,909	21,398	16,964
	유효만기	52,396	21,820	14,779	15,797
	고장 및 동파	9,875	2,089	6,619	1,167

○ 2022년 환경부 스마트관망관리 사업 원격검침 계량기 교체 추진

- 사업기간 : 2021. 11. 5. ∼ 2022. 12. 31.

- 사 업 비 : 52억원(미터기 11억원, 공사비 16억원, 시스템 25억원)

- 대    상 : 20,617전(외곽지역)

구 분	설 치 지 역	대상	교체	잔량
완산구	삼천3동, 평화2동, 동·서학동, 완산동	9,099	7,902	1,197
덕진구	우아2동, 팔복동, 여의동, 조촌동	11,518	10,142	1,376

※ 스마트 관망관리 사업계획 변경에 따라 약5,400전 추가교체예정(’23. 2월까지)

□ 금후계획

○ 계량기 교체 공사 : 5회/년 실시(용역계약 27,000개소, 자체 8,000개소)

- 4차(유효만기)                            : ’22. 10. ∼ 12.

- 5차 교체공사(유효만기 및 동파)           : ’22. 12. ∼ ’23. 2.

급 수 과  소 관

□	맑은물공급사업(노후 상수관망 정비) 2단계	----	11
□	지방상수도 현대화 사업	----	12
□	소규모 배수관 포설공사	----	13
□	대성배수지 이설공사	----	14
□	공동주택 등 노후 급수설비 지원사업	----	15
□	스마트 관망관리 인프라 구축사업	----	16

급수정책팀

맑은물공급사업(노후 상수관망 정비) 2단계

○ 유수율 85%이상 향상으로 선진화된 급수체계 구축과 맑고 깨끗한      수돗물을 공급함으로써 상수도 경영합리화 및 시민이 직접 느낄 수      있는 상수도 수질개선 도모

□ 사업개요

○ 사업위치 : 서신동, 금암동 등 26개 블록(1차 7, 2차 6, 3차 5, 4차 8)

○ 사업규모 : 노후관로 교체 및 블록시스템 구축(L=159km)

○ 총사업비 : 64,326백만원(’22년까지 47,955, ’23년이후 16,371)

○ 사업기간 : 2017. ∼ 2025.(9개년)

□ 추진상황

(단위 : 백만원)

구분		연도	블록 (개)	연장 (km)	공사비	사업 위치	비고
계			76	814	225,526
1단계		’09. ~ ’16.	50	655	161,200	중앙동, 노송동 등 15개 동	완료
2 단 계	소계		26	159	64,326
	1차	’17. ~ ’19.	7	36	11,835	효자동, 삼천동 일원	완료
	2차	’18. ~ ’20.	6	26	11,490	우아동, 금암동, 호성동 일원	완료
	3차	’20. ~ ’22.	5	59	24,630	서신동, 중화산동 일원	완료
	4차	’22. ~ ’25.	8	38	16,371	서신동, 삼천동1가 일원	예정

□ 금후계획

○ 2단계 4차 정비사업 기본 및 실시설계 용역    : ’22. 12. ∼ ’23. 9.

○ 2단계 4차 정비사업 추진                     : ’23. 10. ∼ ’25. 6.

급수정책팀

지방상수도 현대화 사업

○ 노후 상수관망 정비로 누수 저감 및 수돗물 신뢰도를 제고하고,

체계적․효율적 관망관리체계 구축으로 안정적인 수돗물 공급

※ 인천 수돗물 사건 : 붉은 수돗물(’19. 5월), 수돗물 유충사태(’20. 7월)

□ 사업개요

○ 사업대상 : 3개 급수구역(금암 1, 인후 2)

○ 사업내용

- 노후 상수관로 정비(L=275km, 목표유수율 85% 이상)

- 블록시스템 구축 1식, 유지관리시스템 구축 1식

○ 총사업비 : 484억원(국비 253, 도비 48, 시비 183]

○ 사업기간 : 2020. ∼ 2024.(5개년)

□ 추진상황

○ 노후 상수도 개량 국고지원 결정(환경부)                 : ’19. 9.

○ 위·수탁사항 협의 및 협약체결(한국수자원공사)        : ’19. 12.

○ 금암급수구역 우선사업대상지 선정 및 조사(환경부 협의) : ’20. 6.

※  사업대상지 요건 : 유수율 70% 미만 급수구역, 국고 未수혜 구역

○ 기본 및 실시설계 용역 추진(수자원공사 위탁시행) : ’20. 9. ∼ ’22. 12.

- 유지관리시스템 : 상수관망 모니터링 (유량/ 수압/수질 등) 시스템 정비

- 블록시스템 : 블록고립 확인, 수용가 및 유량계 등 현장조사

- 관망정비 : 배․급수관, 밸브류 등 시설물 정비

○ 환경부 사전기술검토(사업 대상지 및 사업비확정)       : ’22. 11.

□ 금후계획

○ 기본 및 실시설계용역 추진(2차년도)        : ’21. 9. ∼ ’22. 12.

○ 지방상수도 현대화사업 공사 추진           : ’22. 7. ∼ ’24. 12.

○ 상수관망 유지관리시스템 정비사업 추진    : ’23. 1. ∼ ’24. 12.

급수시설팀

소규모 배수관 포설공사

○ 농촌지역 등 시 외곽 배수관 미 포설지역 및 개발행위 등 신규 수요가 발생하는 지역에 상수도를 공급하여 시민불편 해소 및 보건위생 향상 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내

○ 사업규모 : 상수관로(D50∼200㎜, L=2.6㎞) 포설

○ 총사업비 : 719백만원(명시이월, 19본예산 600, 추경 100)

○ 사업기간 : 2022. 1. ∼ 12.

□ 세부사업 내용 : L=2.6㎞, 719백만원

사업명	사업량	사업비 (백만원)	비고
배수관 포설공사 실시설계용역	5개소 실시설계	20	완료
난전들로 관말연결공사	D50∼100mm, L=466m	84	완료
반월동 30-7일원 관말연결공사	D80mm, L=528m	107	완료
팔복동3가 27일원 배수관 포설공사	D80∼100mm, L=420m	84	완료
전미중앙로 배수관 포설공사	D100mm, L=420m	105	완료
보훈공원 인근 관경확대공사	D150∼200mm, L=691m	205	완료
사유지 이설 등 긴급공사	D15∼200mm, L=600m	82	완료
용복동 구덕마을 배수관 포설공사	D80mm, L=65m	32	진행중

□ 추진상황

○ 배수관포설공사 실시설계 이행              : ’22. 1. ∼ ’22. 3.

○ 배수관 포설공사 공사 시행 (완료 5개소, 공사중 1개소)  : ’22. 4. ∼

□ 금후계획

○ 2023년도분 사업대상지 조사                : ’22. 10. ∼

급수시설팀

대성배수지 이설공사

○ 전북중소벤처기업 연수원 부지 활용과 배수지 노후에 따른 기존 배수지를 부지 내 여유공간으로 이설하여 대성 급수구역의 안정적인 용수공급 도모를 위함

□ 사업개요

○ 위    치 : 대성 배수지 일원(대성동 479-1 일원)

○ 사업내용 : 배수지 이설 1식(송·배수관로 포함)

○ 사업규모 : 기존 배수지 철거(V=8,600㎥), 배수지 이설(V=10,000㎥)

○ 총사업비 : 170억원 (2022년: 50억, 2023년: 120억)

※재원: 시비 100%

○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 12.

□ 추진상황

○ 전북 중소벤처기업 연수원 건립지원 종합계획(중소기업과)  : ’21. 9.

○ 중기지방재정에 반영, 공유재산관리계획 수립           : ’21. 11.

○ 전주시 공유재산(일반재산) 매각(수도행정과)            : ’21. 12.

○ 기본 및 실시설계용역 행정절차 이행                  : ’22. 1.

○ 기본 및 실시설계용역 추진                           : ’22. 2. ∼ 22. 11

○ 기본 및 실시설계 용역 인·허가(VE,건설기술심의) 이행  : ’22. 10.

□ 금후계획

○ 건설사업 관리용역(감리) 발주                         : ’22. 11.

○ 공사발주                                            : ’22. 12.

○ 공사추진                                            : ’23. 1. ∼ 23. 12.

급수시설팀

공동주택 등 노후 급수설비 지원사업

○ 옥내 급수설비가 노후되어 수돗물 수질기준에 부적합한 공동주택 등에 노후 급수설비 개량사업비 일부를 지원하여 맑고 깨끗한  양질의 수돗물 공급

□ 사업개요

○ 지원근거 :『전주시 상수도 급수조례』제39조(급수설비의 관리 책임 등)

○ 지원대상

- 아연도강관 등 비내식성 자재의 내부가 부식되어 녹물이 출수되는 경우

- 배관 내부 부식으로 수질기준을 초과하는 경우

○ 지원내용

- 85㎡이하 단독 및 공동주택 : 총공사비의 70% 이하 (단독 1,000천원, 공동 50,000천원)

- 학교, 사회복지시설 : 총공사비의 70% 이하 (최대 20,000천원)

○ 사 업 비 : 84백만원(‘22년예산)

□ 추진실적(2015년 ∼ 2022년) : 47개소, 842,331천원

(공동주택 41, 학교시설 3, 사회복지 1, 주택 2)

○ 2015년  : 11개소 (공동주택 10, 학교시설 1), 222,487천원

○ 2016년  : 11개소 (공동주택 10, 학교시설 1), 174,847천원

○ 2017년  :  2개소 (공동주택 1, 사회복지 1),  21,622천원

○ 2018년  :  8개소 (공동주택 7, 학교시설 1), 159,910천원

○ 2019년  :  5개소 (공동주택 5), 105,750천원

○ 2020년  :  4개소 (공동주택 4), 54,215천원

○ 2021년  :  3개소 (공동주택 2, 주택 1), 22,500천원

○ 2022년  :  3개소 (공동주택 2, 주택 1), 81,000천원

※ 대상지: 동서학동 849-129, 팔학골영창아파트, 대명궁궐아파트

□ 금후계획

○ 지원대상자 선정 및 사업시행                   : ’23. 1. ∼ 12.

누수방지팀

스마트 관망관리 인프라 구축사업

○ 2019년 5월 인천 붉은 수돗물 사태 이후 먹는 물 안전관리 강화를 위한  근본적 대책 수립이 필요하여 수돗물 공급 全 과정에 감시체계 인프라 구축

□ 사업개요

○ 사업내용

- (수질관리 및 감시시스템 구축) : 재염소설비, 자동드레인 등

- (사고발생시 위기대응 시스템 구축) : RF 관로인식체계 구축

- (원격검침 시스템 구축) : 원격지시부 1식, 스마트미터기 25,713전

○ 사 업 비 : 13,139백만원[국비(70%) 9,197, 시비(30%) 3,942]

- ’20년 : 9,700백만원(국 7,761, 시 1,939), ’21년 : 3,439백만원(국 1,436 시 2,003)

○ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 2022. 12.

□ 추진상황

○ 스마트 관망관리 인프라 구축 사업 확정통보(환경부)  : ’19. 10.

○ 수도정비 기본계획 변경 고시(시→도→환경부)        : ’20. 1.

○ 기본계획 수립(환경부)                         : ’20. 3. ∼ 10.

○ 스마트 관망관리 위·수탁 체결(한국수자원공사)      : ’20. 11.

○ 세부사업 계획 승인(환경부)                         : ’21. 6.

○ 스마트 관망관리 인프라 구축사업 기술별 발주(한국수자원공사) : ’21. 11.

○ 스마트미터링(원격검침시스템) 설치 착수                   : ’22. 3.

- 사업위치 : 9개 행정동(검침곤란지역)

○  수질자동측정장치, 소규모유량수압, 자동드레인 세부위치(안) 협의

⇔ 한국수자원공사                                   : ’22. 6.

○  스마트 관망관리 인프라 구축 사업계획  변경  승인	: ’22. 10.

□ 금후계획

○ 각 공사별 공정관리를 통한 사업 준공                : ’22. 12.

수질관리과  소관

□	어린이집 대상 찾아가는 수질검사 추진	----	18
□	깨끗하고 안전한 수돗물 공급 및 수질검사 강화	----	19
□	국가 공인 수질검사기관 효율적 운영	----	20
□	상수도 사업장 노후시설 교체	----	21
□	공업용수 노후 취수관 확충공사	----	22
□	전미취수장 특고압 전기설비 교체	----	23
□	공업용수 취수원변경(농어촌공사⇨수자원공사)	----	24

수질분석팀

어린이집 대상 찾아가는 수질검사 추진

○ 면역력이 약하고 질병에 취약한 보육시설 어린이들이 수돗물을

안심하고 음용할 수 있도록 수질검사를 실시 불안감을 해소하고

안전성 검증으로 시민 만족도 향상

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. 1. ∼ 12.

○ 사업대상 : 469개소(관내 어린이집)

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 항목 (10개 항목)

○ 내    용

- 노인일자리를 활용(창출)하여 어린이집을 직접 방문 시료채수

- 수도꼭지 위생 상태 점검 및 잔류염소 농도 확인 병행

- 깨끗하고 안전한 수돗물 홍보 및 수질 이상 발생시 대처방안 안내

수질검사 대상 선정		현장방문 시료채수 및 수돗물홍보교육		수질검사 실시		검사결과 조치
- 관내 어린이집 469개소 ( 완산구 219개소, 덕진구 250개소)		- 노인일자리 20명 활용 - 2인 10개조 편성 - 월 100개소 방문		- 먹는물수질항목 (10개)		· 적합 : 검사결과 송부 · 부적합 : 원인파악 등

□ 추진상황

○ 수질검사 사전안내 및 수질검사 일정 수립           : ’22. 2.

○ 월 100개소 이상 시료 채수 및 수도꼭지수 위생 상태 점검  :  ’22. 4. ∼

- 10월말 기준 어린이집 750회 검사완료

○ 수질검사 결과 송부 및 수돗물에 대한 안전한 음용방법 컨설팅

- 수질 이상 발생 시 연락처 및 대처방안 안내

○ 어린이집 대상 상반기 1회, 하반기 1회 수질검사 실시

□ 금후계획

○ ’22년 12월까지 어린이집 469개소 수질검사 추진 및 홍보영상

(애니메이션) 활용한 수돗물 홍보 교육 병행실시

수질분석팀

깨끗하고 안전한 수돗물공급 및 수질검사 강화

○ 과학적이고 체계적인 수질관리 및 현장 행정으로 시민과 함께

하는 검증 등 확인을 통한 상수도 수질 안전성 확보

□ 사업개요

○ 상수원수 ∼ 수도꼭지수 까지 공급 단계별 수질검사 확대

구 분	법 적 기 준	강 화 시 행
원 수 (상수원관리규칙 제24조)	매월 TOC 등 7개항목 매분기 수은 등 31개항목	매월 40개항목
정 수 (먹는물수질기준및검사등에 관한규칙 제 4조)	매일 탁도 등 6개항목 1회이상 매주 대장균 등 7개항목 매월 비소 등 61개항목	매일 6개항목 6회 매주 15개항목 매월 61개항목 분기 46개항목 추가 (분기별 107개 항목 검사)
수도꼭지수 (먹는물수질기준및검사등에 관한규칙 제 4조)	월 77개소 잔류염소 등 4개항목	월 100개소 잔류염소 등 4개항목

□ 추진상황

○ 용담호 및 고산정수장 매월 정밀검사(한국수자원공사, 전주시)

○ 각 가정 및 상가 등 수도꼭지수 수질상태 표본조사 : 월100개소 이상

○ 수돗물 민원처리 : ’22. 10월 현재 229건(수돗물 안심확인제 152 / 전화 77)

○ 공동주택 순차적 방문 종합검사 추진(깨끗한 수돗물 인중서 발급)

- ’18년(147개소), ’19년(156개소), ’20년(154개소), ’21년(157개소)

- ’22년 10월 현재 176개소 추진 완료

○ 수돗물 품질보고서 발간 : 210,000부(주민센터 배부, 홈페이지 공개)

□ 금후계획

○ 수돗물 안심 확인제 지속 추진 및 공동주택 수돗물 수질검사 실시

○ 어린이집 대상 찾아가는 수질검사 지속 추진

수질분석팀

국가 공인 수질검사기관 효율적 운영

○ 수질검사 공인 검사기관의 효율적인 운영을 통하여 수돗물의

파수꾼 역할과 대시민 행정 서비스 강화

□ 사업개요

○ 공인 검사기관 공공성 및 신뢰성 확보를 위한 분석능력 제고

- 국내 106개 기관 대상 ’22 환경부 분석능력 평가 우수성적 거양

○ 먹는물의 안전성 확보로 시민의 건강 추구

- 수돗물, 약수터, 공원음수대, 수영장수, 목욕장수, 수경시설,

민방위 비상급수 시설 등 안전성 조사

※ 운영인력 6명(환경연구사 1, 환경 4, 의료기술 1)

□ 추진상황

○ ’22 환경부 분석능력평가 결과 국내 최상위 기관 선정 (’22. 5월)

※ 환경부 국립환경과학원『먹는물 수질검사기관 제33호』지정 - ’00. 7월

○ 먹는물 및 생활 속 물상태 철저한 검증 추진

- ’22년 10월 현재 총 검사건수 : 3,505건 (의뢰 1,026건, 자체 2,479건)

·상수원 정수(1,504), 상수도 원수(85), 상수도 노후관(130), 수돗물안심확인제(152)

공동주택 수돗물 인증제(176), 지하수(286), 약수터(20), 수영장수(44)

목욕장수(24), 수경시설(334), 어린이집(750)

□ 금후계획

○ 수질분석 능력 배양을 위한 자체 정도관리 강화

○ 현장방문 수질검사 서비스 강화를 통한 시민건강 증진

○ 연간 4,200여건 수질검사 의뢰 시료에 대한 신속한 처리

시설관리팀

상수도 사업장 노후시설 교체

○ 상수도 시설의 노후화로 인해 발생될 수 있는 각종 안전사고를 사전에

예방하여 시설물 유지관리 및 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급

□ 시설현황

시설명	시설용량 (㎥/일)	시설년도
팔복 정수장	70,000	1989. 12.
전미 취수장	70,000	1989. 12.
팔복 가압장	10,500	2014. 5.
대성 배수지	8,600	1975. 10.
	4,500	2013. 7.
인후 배수지	30,000	1996. 12.
천마 배수지	30,000	2002. 5.
효자 배수지	15,000	2002. 5.
금암 배수지	7,000	1984. 4.

시설명	시설용량 (㎥/일)	시설년도
송천 배수지	7,000	1986. 12.
화산 배수지	7,000	1992. 12.
지곡 배수지	15,000	2013. 11.
팔복 배수지	30,000 (공업:4,500)	2014. 3.
서신배수지	70,000	1984. 4.
삼천 가압장	30,000	2013. 11.
원당 가압장	27,000	2012. 12.

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. 1. ∼ 12.

○ 사업대상 : 15개소(배수지 10, 정수장 1, 취수장 1, 가압장 3)

○ 사 업 비 : 300백만원

○ 사업내용 : 배수지 및 가압장 노후시설 교체

- 송·배수관로 보수, 펌프·밸브·기계설비 등 교체 및 설치

□ 추진상황

○ 천마배수지 유입관 부단수 공사                       : ’22. 7.

○ 송천배수지 외 4개소 전기설비 보수공사               : ’22. 10.

○ 인후배수지 외 7개소 시설물 보수공사                 : ’22. 10.

※ 2022. 11월 현재 지출액 : 177백만원

□ 금후계획

○ 노후 시설물 보수공사 추진                           : ’22. 11.

시설관리팀

공업용수 노후 취수관 확충공사

○ 만경강 하천에 매설 되어 있는 노후(내부 퇴적) 유공관의 기능상실 우려 및

건기철 물량 부족 해소를 위한 추가 확충을 통해 안정적인 공업용수 확보

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. 1. ∼ 5.(공사 중지)

○ 사업위치 : 전미취수장 만경강 유역(덕진구 전미동 2가 1006-1)

○ 사 업 비 : 779백만원(도급 490, 관급 289) 사고이월

○ 사업규모 : 취수관로 설치(D=1,350mm, L=220m, 집수정 4개소)

□ 추진상황

○ 공사발주                                            : ’21. 12.

○ 접합점 연결 공법 부적합 공사 중지                   : ’22. 4.

○ 설치공법 변경 검토                                  : ’22. 9.

○ 설계변경심사위원회 심의 및 일상감사 의뢰            : ’22. 10.

□ 문제점 및 대책

○ 유공관과 최종 집수정 설치 연결작업 중 다량의 하천수 유입(역류)

및 안전사고 우려로 공사 중지 불가피

□ 안전사고 예방 및 예산 증액을 최소화하는 최적의 공법 방안 도출 후 공사 추진

□ 금후계획

○ 일상감사 완료 후 공사추진                             : ’22. 11.

시설관리팀

전미취수장 특고압 전기설비 교체

○ 공업용수의 원할한 공급을 위해 설치 후 30년이 경과된 노후 전기

수․배전반 설비를 교체하여 안전사고 예방과 안정적 용수공급

※ 내구연한 : 변압기 10년, 배전반 11년

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. 6. ～ 12.(공사중지)

○ 사업대상 : 전미취수장(전미동2가 1006-1)

○ 총사업비 : 600,000천원(도급87,241 관급371,870 기타 140,889)

* 기타 : 설계 및 감리용역, 시설부담금(한전), 각종 관련시설 공사 등

○ 사업규모 : 특고압 수․배전설비 교체 1식

- 교체설비 : 특고압설비 7면(변압기 3대, ALTS, 고압차단기반 등)

고압기동 펌프배전반 7면, 지중전력선로, 터파기, 철거 등

- 예비전력선로 : 2회선 복선화 공사(제방700m), 전주 교체 12조

○ 추진근거 : 전기사업법 제19조(전기설비의 유지), 제20조(적합 명령)

- ’20년 한국전기안전공사 정기검사 시설개선 요구

※ 취수장 시설현황(설치 1967. 12월, 개량 1989. 12월)

- 펌프 5대(300마력 2대, 200마력 3대) 배전반 7면, 변압기 3대(750KVA, 30KVA)

- 시설용량 : 70,000㎥/일( ’21년 기준 일평균 사용량 36,042㎥)

- 용수공급 : 전주1,2공단 및 자원순환특화단지, 국립농업과학원 등 25개업체 공급

□ 추진상황

○ 한전 예비전력선로 관련 시공 협의                   : ’22. 4.

○ 실시설계 및 일상(계약심사)감사 완료                 : ’22. 4.

○ 관급자재 및 공사 착공                              : ’22. 6.

○ 예비전력 선로공사 완료(한국전력)                    : ’22. 10.

○ 도급·관급, 감리용역 공사중지                       : ’22. 10.

- 관급자재 납품지연에 따른 공사중지

(변압기 철심제작 포스코공장 침수피해 및 납품시 지적사항발생)

□ 금후계획

○ 관급자재 납품 및 시운전                            : ’22. 11.

○ 사용전검사 및 예비전력 시운전(안전공사, 전력공사합동)    : ’22. 11.

시설관리팀

공업용수 취수원 변경(농어촌공사 ⇨ 수자원공사)

□ 개     요

○ 전환일정 : 2022. 7. 1. ～ (농어촌공사 기간만료 : 2022. 6. 30)

○ 수원변경 : 농어촌공사(대아․경천저수지) ⇨ 수자원공사(용담댐)

○ 취수위치 : 전미취수장(덕진구 전미동 2가1006-1)

○ 시설용량 : 70,000㎥/일(사용량 39,000㎥/일)

○ 공급규모 : 전주1․2공단 등 25개 업체 및 기관

○ 댐용수 계약 및 허가현황

- 수자원공사 댐용수 계약(2022.6.21) : 45,000㎥/일

- 환경부(영산강 홍수통제소)하천수 및 하천점용 허가(2022.6.30.)

구분	하천수 사용허가	하천점용허가	비고
점용면적	영구:15,336㎡	영구:15,336㎡	-하천수사용허가 수자원공사 계약기간과 동일 -점용허가기간 국토관리청 기 허가완료하였으나 환경부로 이관되어 재 신청
허가량	70,000㎥	70,000㎥
허가기간	2022.7.1.～2022.12.31	2022.7.1.～2024.12.31

□ 추진상황

○ 농어촌공사 농업용수 사용계약 종료               : ’21. 12.

- ’22. 1. 1 ～ 6. 30까지 행정절차 이행기간 무상사용

○ 용담댐 공업용수 전환 관련 지자체 간담회          : ’22. 5. 25.

○ 취수설비(유량계 등) 합동점검                      : ’22. 5. 30.

○ 용담댐용수 사용계약 완료                          : ’22. 6. 21.

○ 하천수 및 하천점용허가 완료                        : ’22. 6. 30.

○ 용담댐(만경강) 하천수 취수개시                     : ’22. 7. 1.

□ 요금체계 변경(원수대금 증가)

○ 당초 : 일 취수량 중 35,000㎥ 공제 후 사용수량 만큼 비용납부

- ’21년 납부액 55백만원(취수량 13,148천톤, 납부량 555천톤/단가 98.57원)

□ 변경 : 취수량 공제 없이 사용수량 전량 부과

- ’23년 증가예상액 : 750백만원(전년대비 695백만원 증가)

〔산출 : 단가 52.7원 × 39,000톤 × 365일〕

하 수 과  소 관

□	생태도시 구현을 위한 하수관로 정비사업	----	26
□	팔복[3,5,6분구] 처리구역 하수관로 정비사업	----	27
□	전주 공공하수처리시설(4단계) 증설	----	28
□	농촌마을 환경개선 하수도 정비사업	----	29
□	체계적 지하수시설 조사로 물자원 관리강화	----	30

하수시설팀

생태도시 구현을 위한 하수관로 정비사업

○ 쾌적한 생태도시 구현과 새만금 상류 수질개선에 기여하고, 오염 부하량

저감 및 불명수 감소로 하수처리 경영 합리화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2002년 ∼ 2035년(34년간)

○ 위    치 : 7개 처리구역 36개분구, 6개 지구, 취락지역 54개 마을 등

○ 사 업 비 : 8,957억원(국비 50%, 도비 10%, 시비 35%, 기금 5%)

○ 사업규모 : 하수관로정비 1,015km, 배수설비 55,720개소

□ 추진상황

○ 2021년까지 완료(64%, 5,013억원) : 8개 구역

- 하수관로 정비 648.7km, 배수설비 36,066개소

○ 2022년 계속사업(22%, 2,804억원) : 7개 구역

- 하수관로 정비 218.1km, 배수설비 13,196개소

(단위 : km, 억원)

사 업 명			사업 규모	총투자 규모	추진실적/계획
총 계			218.1	2,803
계속사업	진 행 중 인 사 업 ︵ ’19 ~ ’26 ︶	팔복(1,2) : 팔복동	32.6	279	- 공사 중(’24. 2월 완료) - 공정률 50%
		중앙(9,10) : 중앙동, 풍남동, 노송동	33.7	498	- 공사 중(’25. 6월 완료) - 공정률 20%
		중앙(8) : 중앙, 풍남동	22.2	356	- 공사 중(’24. 10월 완료) - 공정률 50%
		화산(1,2,7) : 완산, 서학, 삼천, 평화, 효자, 우아	33.5	496	- 공사 중(’26. 4월 완료) - 공정률 13%
		중앙(6,7), 화산(6), 아중(1) : 중앙동, 진북동	41.4	496	- 화산6분구 공사발주(’22. 9) - 잔여분구 순차발주(22.10.~12.)
		아중(2분구) 및 편입구역 : 호성동, 우아동	33.2	364	- 설계용역 중(’23. 6월 완료) - 공사발주(’23. 하반기)
	신규	팔복(3,5,6,분구) : 조촌동, 여의동, 팔복동	21.5	314	- 설계용역 중(’23. 12월 완료) - 공사발주(’24. 상반기)

□ 금후계획

○ 잔여 사업(14%, 1,140억원) 계속 추진 : ∼ ’35년 까지

- 하수관로 148.2km, 배수설비 6,458개소

하수시설팀

팔복[3,5,6분구] 처리구역 하수관로 정비사업

○ 조촌동, 여의동, 팔복동 일원의 하수관로 정비사업 추진으로 악취 저감 등 지역 주민 불편해소 및 주거환경 개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ∼ 2027년(6년간)

○ 위    치 : 덕진구 조촌동, 여의동, 팔복동 일원

○ 사 업 비 : 314억원(국비 50%, 도비 10%, 시비 35%, 기금 5%)

○ 사업규모 : 하수관로정비(우·오수 신설 및 개량) L=21.5km

※ 배수설비 936개소, 기타부대시설 1식

□ 추진상황

○ ’22년 신규 국고보조사업 신청                   : ’21. 3.

○ ’22년 신규사업 예산 확보(국비 5억, 지방비 15억)  : ’22. 1.

○ 행정절차(계약심사, 일상감사, 원가심사 등) 이행	: ’22. 1.  ∼  4.

○ 기본 및 실시설계용역 발주 및 PQ평가	: ’22. 5.  ∼  6.

○ 용역 착수	: ’22. 6.

□ 금후계획

○ 기본 및 실시설계용역 완료	: ’23. 12.

○ 재원협의 및 공공하수도설치인가 등 행정절차이행	: ’24. 1. ∼  5.

○ 공사 추진	: ’24. 6. ∼ ’27. 12.

하수정비팀

전주 공공하수처리시설(4단계) 증설

○ 에코시티, 효천지구 택지개발 및 향후 도시개발에 따른 유입하수량

및 오염부하량 증가에 따른 공공하수처리시설 증설 필요

* 국무총리 주재 제16차 새만금위원회에서 새만금 목표수질 달성을 위한 추가 보완대책 발표(2015. 12. 4.)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017년 ∼ 2026년(10년간)

○ 위    치 : 덕진구 고내천변로 58일원(전주 환경사업소 내)

○ 사 업 비 : 794억원(국비 308, 도비 154, 시비 332)

○ 사업규모 : 증설용량 36,000㎥/일(403,000㎥/일 ⇨ 439,000㎥/일)

-기존 하수처리 403,000㎥/일(1단계- 113,000(90년), 2단계- 190,000(97년), 3단계- 100,000(05년))

□ 추진상황

○ 하수도정비 기본계획 (변경)수립	: ’17. 3.

○ 사업계획 적정성 검토(공공투자관리센터)	: ’18. 10.

○ 위·수탁 협약체결(전주시⇔한국환경공단)	: ’19. 12.

○ 기본 및 실시설계용역 착수	: ’20. 6.

○ 공법선정 및 기본 실시설계 추진	: ’21. 10.

□ 금후계획

○ 기본 및 실시설계 자문	: ∼ ’23. 4.

○ 재원협의(환경부) 및 총사업비 조정(기재부)	: ∼ ’23. 10.

○ 공사 계약 및 추진(33개월)	: ’23. 12. ∼

하수정비팀

농촌마을 환경개선 하수도 정비사업

○ 농촌마을에 오수관을 설치하여 생활오수를 깨끗이 처리함으로써

주민들의 삶의 질 향상 및 새만금 상류지역 수질개선 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2005년 ∼ 2024년(20년간)

○ 위    치 : 관내 농촌마을 일원

○ 사 업 비 : 52,780백만원(국비 70%, 시비 25%, 기금 5%)

○ 사업규모 : 22개 지구(처리시설 710㎥/일, 관로 84.9km)

□ 추진상황

○ 2021년까지 완료(76%, 35,941백만원)

- 9개 소규모처리장(처리시설 540㎥/일, 관로 23.4km), 9개 연계처리(관로 41.4km)

○ 2022년 2개지구 준공 및 1개지구 시행(20%, 14,625백만원)

- 처리시설 170㎥/일, 관로 17.2km

○ 2023년 1개지구 시행(4%, 2,214백만원)

- 관로 2.9km

(단위 : km, 백만원)

사 업 명		사업규모	총투자 규모	(추진실적/계획)
총 계		20.1km Q=170㎥/일	16,839
계속 사업 (2018. ~ 2023.)	화신지구 (조촌동)	9.6 (Q=95㎥/일)	6,563	• 착 수 : 2018. 05. 28. • 공 정 : 100% • 2022.6월 완료
	신기지구 (조촌동)	3.8 (Q=75㎥/일)	4,390	• 착 수 : 2020. 12. 24. • 공 정 : 74% • 2023.5월 완료예정
	전당지구 (전미동)	3.8	3,672	• 착 수 : 2020. 07. 20. • 공 정 : 100% • 2022.6월 완료
	아중.용계지구 (우아동 )	2.9	2,214	• 공사중지 중(24. 12월 완료예정) ※ 아중천 하천기본계획 변경 중(’22. 5.~)으로 아중·용계지구 재설계 후 공사추진

□ 금후계획

○ 사업추진(신규, 계속사업)                 : ’22. 2. ∼ ’24. 12.

지하수관리팀

체계적 지하수시설 조사로 물자원 관리강화

○ 지하수시설에 대한 체계적인 관리 강화로 적정한 지하수 개발․이용을 도모하고 수질오염 예방 및 물 부족 상황에 적극 대비

□ 주요현황

○ 지하수시설 등록현황 (2022. 10월 기준)

(단위 : 개소)

구 분	총 계	생활용수			농업용		공업용
		소계	음용수	비음용수
계	6,780	3,611	282	3,329	3,104	65
신 고	6,511	3,486	266	3,220	2,996	29
허 가	269	125	16	109	108	36

○ 주요업무

- 하수도사용료 부과대상 조사 및 계량기 설치․고장 여부 조사

- 미신고․허가 지하수시설 발굴 및 시설물 실태 파악

- 지하수시설 불용공, 미사용, 행불, 고장, 방치 여부 조사 등

-『지하수통합 정보관리시스템』운영 활성화

□ 추진상황

○ 지하수 공인유량계 신설 및 교체 (교체 56개소, 신설 71개소)

○ 검침곤란 시설 옥외검침시스템 유지보수 (714개소)

○ 지하수시설 이용실태 현장조사

- 계량기 미부착 가구 공인유량계 설치, 방치공 처리안내 등

○ 지하수 보조관측망 설치 및 운영 : 총 24개소 운영

□ 금후계획

○ 지하수 의심 사용가·다량 사용가에 대한 지속적 점검 관리

○ 공인유량계 신설·교체 및 옥외검침시스템 사후 유지관리