제403회 전주시의회 임시회 복 지 환 경 위 원 회

2023년도

주요업무추진상황

상하수도본부

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진계획
	○	수 도 행 정 과	-------	5
	○	급 수 과	-------	9
	○	수 질 관 리 과	-------	16
	○	하 수 과	-------	22

일  반  현  황

□ 기   구 : 4과 14팀

									상하수도본부
	수도행정과 (4팀)							급 수 과 (3팀)								수질관리과 (3팀)								하 수 과 (4팀)
	수도정책							급수정책								수질관리								하수정책
	수도요금							급수시설								수질분석								하수시설
	체납징수							누수방지								시설관리								하수정비
	계량기관리																							지하수관리

※ 서신통합센터, 누수신고센터, 계량기시험소, 사업장 15개소(취수장 1, 배수지 10, 정수장 1, 가압장 3)

□ 정‧현원

과 별		총 계	일 반 직						연구사
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	82	1	4	22	27	15	10	3
	현 원	81	1	4	28	20	9	17	2
수도행정과	정 원	22	1	1	5	8	5	2
	현 원	22	1	1	6	9	3	2
급 수 과	정 원	16		1	4	7	1	3
	현 원	16		1	4	4	1	6
수질관리과	정 원	28		1	8	8	6	2	3
	현 원	28		1	13	5	2	5	2
하 수 과	정 원	16		1	5	4	3	3
	현 원	15		1	5	2	3	4

※ 공무직 31명 (수도행정과 18, 급수과 9, 수질관리과 2, 하수과 2), 육아휴직 1명(하수과)

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
수도행정과	○ 상하수도본부 운영 총괄 ○ 상수도공기업 특별회계 운영 ○ 공사 및 용역 계약, 물품관리 ○ 상수도요금 조정 및 관련 조례 제․개정 ○ 검침업무 운영 및 관리 ○ 상하수도요금 과징업무 전반 ○ 급수중지․개전․폐전에 따른 계량기 관리 ○ 고장․노후계량기 교체관리 ○ 계량기시험소 운영관리
급 수 과	○ 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 ○ 상수도 중장기계획 수립․시행 ○ 비상급수계획 및 대책수립 총괄 ○ 급수공사, 상수도 증설 및 확장공사 ○ 간이상수도 유지관리업무 ○ 누수탐사 및 누수복구업무, 누수방지대책 수립 ○ 누수신고센터 운영관리
수질관리과	○ 생활용수 공급 및 공업용수 생산․공급 ○ 광역상수도 수요에 따른 수급 조절 및 관리 ○ 각 사업장 구축물․건물 유지보수 및 안전관리 ○ 국가공인수질검사기관 적정 운영 및 정도관리 ○ 먹는물 공동시설(약수터) 및 간이상수도 수질검사 ○ 상수도 원․정수 수질관리 및 보전 ○ 상수원보호구역 관리
하 수 과	○ 하수도정비 기본계획(변경) 수립 ○ 하수도공기업 특별회계 운영 ○ 하수관로 정비사업 ○ 하수관로정비 민간투자(BTL)사업 유지관리 ○ 마을하수도 시설 및 유지관리 ○ 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리 ○ 효율적인 지하수 및 빗물이용 관리

기  본  현  황

(2023. 6.  30일 기준)

□ 급수현황

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전 (개)	유수율 (%)	급수량(천㎥/일)
						계	생활 용수	공업 용수
646,728	640,270	99.9	416	243,266	79.7	280	241	36

□ 상수도관

(단위 : ㎞)

총 연 장	도․송수관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,601	77	948	1,576

□ 상수원 보호구역

구 분	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎡)	상류(m)	하류(m)		안내판	표주
방수리	284,775	1,000	500	’72. 5. 5.	8	26

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

□ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	하수인구 보급율 (%)
계		71.63	2,335	1,954	98.6
합 류 식			0	341
분류식	소 계	71.63	2,335	1,613
	오수관거		1,108	727
	우수관거		1,227	886

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	환기구 (개소)	우수토실 (개소)
계	88.9	1,010	73	251
전주천 (좌, 우안)	25.3	369	37	142
삼 천 (좌, 우안)	12.3	155	18	45
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	9	38
아 중 선	12.0	174	4	16
팔복선(공장,생활)	16.9	183	5	8
상 관 선	10.4	47		2
기타(구화천,태평로, 연화천,덕적천,중복천)	7.6

□ 하수․위생처리 시설

구 분	환 경 사 업 소	수 질 복 원 센 터
위 치	전주시 덕진구 고내천변로 58	전주시 덕진구 중동로 150
면 적	320,990㎡	30,182㎡
시설규모 (처리용량)	규 모 : 403,000㎥/일 - 1단계 : 113,000㎥ (1990년) - 2단계 : 190,000㎥ (1997년) - 3단계 : 100,000㎥ (2005년)	규 모 : 16,500㎥/일 (2015년)
부대시설	° 위생처리장(290㎘/일) : 2002년 ° 총인처리시설(403,000㎥/일) : 2015년 ° CSOs처리시설(100,000㎥/일) : 2015년

수도행정과 소관

□	정확한 자료로 신뢰받는 상·하수도요금 부과	----	6
□	상·하수도 체납요금 징수율 제고	----	7
□	노후 및 고장 수도계량기 교체사업	----	8

수도요금팀

정확한 자료로 신뢰받는 상·하수도요금 부과

○ 수도계량기 검침설비 구축·관리와 수용가 부과자료의 철저한 정비로

정확한 상·하수도 요금부과를 통한 신뢰받는 상수도 행정구현

□ 추진방향

○ 검침전수 : 243,266전(일반주택 84,419전 / 공동주택 158,817전 /산업용 30전)

○ 검 침 원 : 164명 (일반주택 65, 공동주택 99)

○ 기준요금 : 1,290원/㎥ (상수도 720, 하수도 400, 물이용부담금 170)

※ 가정용 기준 20㎥이하

○ 부과현황 (2023년 1월 ~ 6월)

(단위 : 건 / 백만원)

구분	합계	가정용	일반용	대중탕용	산업용
계	2,882,816 54,583	2,551,171 27,875	330,285 22,937	692 352	668 3,419
상수도	1,456,801 32,283	1,287,388 18,260	168,848 11,691	367 210	198 2,122
하수도	1,426,015 22,300	1,263,783 9,615	161,437 11,246	325 142	470 1,297

※ 월 평균 부과액 : 9,097백만원(2023. 6. 30.기준)

□ 추진상황

○ 상반기 다량 수용가 일제 점검 실시 (1회) : ’23. 3. 6. ~ 3. 24.

- 월 사용량 300㎥ 이상 수용가 확인 : 총 838전

○ 정확한 검침 확인을 위한 수시 현장점검반 운영 (2회) : ’23. 2. 20. ~ 5. 26.

- 임의 수용가 현장실사 : 73건

- 대형병원, 관공서 등의 상수도 계량기 지침 및 봉인상태 확인

□ 금후계획

○ 전자고지 수용가 확대를 위한 연중 상시 홍보 및 신청 유도

○ 체계적이고 정확한 검침 확인을 위한 수시 현장점검반 운영 : ’23. 7 ~ 12.

○ 하반기 다량 수용가 및 0톤 수용가 일제 점검 실시

- 월 사용량 300㎥ 이상 수용가 점검

- 6개월 이상 사용량 0톤 수용가 대상

체납징수팀

상·하수도 체납요금 징수율 제고

○ 체납자에 대한 상시독려, 단수예고, 정수처분을 통한 체납요금 조기징수와

자진 납부의식 제고 및 상습·고액체납자 징수강화로 안정적인 세입확보

□ 과징현황 (2023. 5. 31. 기준)

(단위 : 백만원)

구 분		조정액	징수액	결 손	체납액	징수율(%)
합 계		51,752	49,438	0	2,314	95.53
상수도	계	27,974	26,714	0	1,260	95.50
	현년도	26,810	25,887	0	923	96.56
	과년도	1,164	827	0	337	71.07
하수도	계	23,778	22,724	0	1,054	95.57
	현년도	22,789	22,064	0	725	96.82
	과년도	989	660	0	329	66.74

□ 추진상황

○ 상반기 체납 상하수도사용료 특별징수기간 운영 : 4. 24. ~ 5. 31.

- 징수액 1,387백만원 (목표 962백만원 대비 144.2%)

○ 체납수용가 안내문 발송 및 단수계고 : 16,299전 5,130백만원

○ 정수(단수)처분 및 개전 : 2회 이상 7만원 이상 체납수용가 계고

- 단수 181전 1,801건 105백만원 / 개전 105전 937건 55백만원

○ 고액체납자 재산조회 및 압류 추진 : 23전 229건 299백만원

□ 금후계획

○ 체납 단수반 연중 지속 운영

○ 상‧하수도사용료 체납내역 안내 : 우편발송(월1회) / 단수계고(매일)

- 체납수용가에 대한 체납처분 예고 안내문 발송 및 단수계고장 직접교부 등

○ 체납 상하수도사용료 특별징수기간 운영 : 하반기 2회(9월, 12월)

○ 지역담당 현장방문 및 전화 독려(3개반 8명, 기간제 단수요원 포함)

○ 상습·고액 체납자 재산조회 및 압류 등 체납처분으로 채권 확보

계량기관리팀

노후 및 고장 수도계량기 교체 사업

○ 유효기간이 만기된 노후 및 고장난 수도계량기를 지속적으로 교체하여

상수도 행정의 신뢰성을 향상하고 수용가에 질 높은 수도서비스 제공

□ 사업개요

○ 사업대상 : 19,646전【전체 243,266전 (공동 158,817전, 단독 등 84,449전)】

구 분	합 계	유효만기	고장 및 동파	비고
교체계획	19,646전	17,646전	2,000전

○ 사업내용 : 유효만기 및 고장계량기 교체 등

○ 사 업 비 : 1,742백만원 (시비)

- 계량기 구입 839백만원, 계량기 교체공사 903백만원

○ 사업기간 : 2023. 1. ∼ 12.

○ 추진근거 : 계량에 관한 법률 제23조2항 및 같은법 시행령 제21조

- 검정ㆍ재검정의 유효기간 : 15∼50mm(8년), 50mm 초과(6년)

□ 추진상황

○ 최근 3년 계량기 교체 추진실적

(단위 : 천원)

구 분		계	2021년	2022년	2023년	비고
사 업 비		5,984,441	1,943,420	2,298,635	1,742,386
교체실적	계	52,155	21,398	21,958	8,799
	유효만기	41,813	14,779	19,895	7,139
	고장 및 동파	10,342	6,619	2,063	1,660

□ 금후계획

○ 노후·고장 계량기 교체 공사  : 5회 / 년 실시

- 2차 ∼ 4차 교체공사(유효만기 및 고장)    : ’23.  6. ∼ 12.

- 5차 교체공사(유효만기 및 동파)           :  ’23. 12. ∼ ’24. 2.

급 수 과  소 관

□	맑은물공급사업(노후 상수관망 정비) 2단계	----	10
□	지방상수도 현대화 사업	----	11
□	소규모 배수관 포설공사	----	12
□	대성배수지 이설공사	----	13
□	공동주택 등 노후 급수설비 지원사업	----	14
□	긴급 누수복구 공사	----	15

급 수 정 책 팀

맑은물공급사업(노후상수관망정비) 2단계

○ 선진화된 급수체계 구축 및 지속적인 노후관망 정비를 통한 유수율      향상으로 상수도 경영합리화 및 맑고 깨끗한 수돗물의 안정적인 공급

□ 사업개요

○ 위    치 : 서신동 등 78블록(1차 7, 2차 6, 3차 5, 4차 8, 5~8차 52)

○ 사업규모 : 노후관로 교체(L=395km) 및 블록시스템 구축

○ 사업비 : 122,692백만원(’22년까지 47,955, ’23년이후 74,737)

※ 총사업비 : 283,892백만원(1단계 161,200, 2단계 122,692)

○ 사업기간 : 2017. ∼ 2029.(13개년)

□ 추진상황

(단위 : 백만원)

구분		연도	블록	연장 (km)	사업비 (백만원)	사 업 위 치	비고
계			128	1,050	283,892
1단계		’09.~’16.	50	655	161,200	중앙동, 노송동 등 15개 동	완료
2 단 계	소계		78	395	122,692
	1차	’17.~’19.	7	36	11,835	효자동, 삼천동 일원	완료
	2차	’18.~’20.	6	26	11,490	우아동, 금암동, 호성동 일원	완료
	3차	’20.~’22.	5	59	24,630	서신동, 중화산동 일원	완료
	4차	’23.~’25.	8	38	16,371	서신동, 삼천동1가 일원	추진중
	5~8차	’26.~’29.	52	236	58,366	중화산동, 평화동 외 10개 동	예정

□ 금후계획

○ 2단계 4차 정비사업 기본 및 실시설계 추진	: ′23. 3. ~ ′23. 11.

○ 2단계 4차 정비사업 공사 추진	: ′23. 12. ~ ′25. 12.

○ 2단계 5차 ~ 8차 정비사업 추진	: ′26. ~ ′29.

급 수 정 책 팀

지방상수도 현대화 사업

○ 체계적·효율적 관망관리체계 구축으로 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하고         누수 저감을 통해 안정적인 수돗물을 공급하고자 노후 상수관로 정비 추진

□ 사업개요

○ 사업대상 : 3개 급수구역(금암 1, 인후 2)

○ 사업내용

- 노후 상수관로 교체 및 개량(L=275km, 목표유수율 85% 이상)

- 블록시스템 구축 1식, 유지관리시스템 구축 1식

○ 사 업 비 : 524억원[국비(50%) 283, 도비(10%) 52, 시비(40%) 189]

※ 수도사업 경영개선 평가결과에 따른 국비 2,095백만원 인센티브 지급(시비 부담금 2,095백만원 절감)

○ 사업기간 : 2020. ~ 2024.(5개년)

□ 추진상황

○ 노후 상수도 개량 국고지원 결정(환경부)	: ′19. 9.

○ 수자원공사와 위·수탁사항 협의 및 협약체결	: ′19. 12.

○ 금암 급수구역 우선 사업대상지 선정(환경부 협의)	: ′20. 6.

※ 사업대상지 요건 : 유수율 70% 미만, 국고 未수혜 구역

○ 기본 및 실시설계 용역 추진(수자원공사 위탁시행)	: ′20. 9. ∼ ′23. 10.

- 유지관리시스템 : 상수관망 모니터링 시스템(유량/ 수압/수질 등) 정비

- 블록시스템 : 블록고립 확인작업, 수용가 및 유량계 등 현장조사

- 관망정비 : 배․급수관, 밸브류 등 시설물 정비

○ 환경부 사전기술검토 승인(사업 대상지 및 사업비확정): ′22. 12.

□ 금후계획

○ 블록시스템 구축 및 노후 상수관로 정비공사 추진	: ′23. 4.∼ ′24. 12.

○ 상수관망 유지관리시스템 정비사업 추진      : ′23. 6.∼ ′24. 12.

급수시설팀

소규모 배수관 포설공사

○ 농촌동 및 도심외곽 등 취락 밀집지역의 상수도 관로 매설로

급수민원을 해소하고 안전하고 맑은물 공급 확대

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내

○ 사업규모 : 상수관로(D50∼200mm, L=2.6km) 포설

○ 총사업비 : 600백만원

○ 사업기간 : 2023. 1. ∼ 12.

□ 추진상황

○ 사업대상지 현장 조사                         : ′22. 12. ∼ ′23. 1.

○ 대성동 1030-42번지 일원 외 1개소 실시설계 추진    : ′23. 3. ∼ ′23. 5.

○ 대성동 1030-42번지 일원 외 1개소 토지사용승낙     : ′23. 6.

□ 금후계획

○ 공사발주 및 추진                                : ′23. 7. ∼ 11.

○ 잔여 사업대상지 실시설계 및 공사 추진        : ′23. 7. ∼

※ 토지사용 미동의시 사업대상지 변경

급수시설팀

대성배수지 이설공사

○ 광역상수도 전환(’14년 1월)에 따른 미사용 방치된 정수시설 철거

○ 노후 된 기존 배수지 확대 이설로 안정적 용수 공급

□ 사업개요

○ 위    치 : 대성 배수지 일원(완산구 대성동 479-1 일원)

○ 사업규모 : 기존 배수지 철거(V=8,600㎥), 배수지 이설(V=9,900㎥)

○ 사 업 비 : 170억원 (기확보 117억, 2024년: 53억)

※ ’24년 본예산에 53억 확보 필요

○ 사업기간 : 2022. ∼ 2024.

□ 추진상황

○ 전북 중소벤처기업 연수원 건립지원 종합계획 수립 : ′21. 09.

○ 전주시 공유재산 매각(수도행정과)                 : ′21. 12.

○ 기본 및 실시설계 용역 착수 및 추진              : ′22. 04.∼

○ 공사 건설사업관리(감리)용역 착수                     :  ′23. 3.

○ 대성배수지 이설공사 수도사업 인가(전북환경청)        : ′23. 4.

○ 공사업체 선정 및 착수                               : ′23. 6.

□ 금후계획

○ 공사 및 건설사업관리용역 추진                  : ′23. 7. ∼ ′24. 9.

급수시설팀

공동주택 등 노후 급수설비 지원사업

○ 공동주택, 단독주택 등 노후 된 옥내 급수관 개량에 필요한 공사비

일부를 지원하여 맑고 깨끗한 수돗물 제공으로 시민건강에 기여

□ 사업개요

○ 지원근거 : 『전주시상수도급수조례』제39조(급수설비의 관리 책임 등)

○ 지원대상 : 아연도관 또는 내부부식으로 수질기준을 초과하는 경우

○ 지원내용

- 85㎡이하 단독 및 공동주택 : 총공사비의 70%이하 (단독 1백만원, 공동 50백만원)

- 학교, 사회복지시설 : 총공사비의 70% 이하 (최대 20백만원)

○ 사업비 : 140백만원

○ 사업기간 : 2023. 1. ∼ 12.

해당연도	지원대상	사업비
2015년	11개소 (공동주택 10, 학교시설 1)	222,487천원
2016년	11개소 (공동주택 10, 학교시설 1)	174,847천원
2017년	2개소 (공동주택 1, 사회복지 1)	21,622천원
2018년	8개소 (공동주택 7, 학교시설 1)	159,910천원
2019년	5개소 (공동주택 5)	105,750천원
2020년	4개소 (공동주택 4)	54,215천원
2021년	3개소 (공동주택 2, 주택 1)	22,500천원
2022년	3개소 (공동주택 2, 주택 1)	81,000천원
2023년	2개소 (공동주택 1, 주택 1)	29,226천원
합계 : 49개소(공동주택42 , 학교시설 3, 사회복지 1, 주택3) 871,557천원

□ 추진상황

□ 금후계획

○ 지원대상자 선정 및 사업 시행              : ′23. 1. ∼ 12.

누수방지팀

긴급 누수복구 공사

○ 상수도 시설의 돌발적인 누수 등 민원을 신속하게 처리함으로써 예산낭비를 방지하고 시민불편을 해소하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내

○ 사업규모 : 긴급 누수복구 750건/년 정도

○ 사 업 비 : 1,200백만원/년

○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

□ 추진상황

○ 2023년도 긴급누수복구 공사 추진	: ′23. 1. ∼ 6.

- 완산 1~4차완료·5차 추진중 / 덕진 1~3차완료·4차추진중

- 6월말 기준 민원 1,704건* 처리완료

* 1,704건 : 누수민원처리 484, 앵글밸브보수 697, 급수불출 268, 이물질제거 70, 기타 186

○ 연도별 민원처리 현황

(단위 : 백만원, 건)

연도	합 계	2020	2021	2022	2023. 6월	비고
사업비	4,007	917	1,190	1,200	700
계(민원 처리)	14,160	3,536	4,792	4,128	1,704
단가업체	2,386	558	721	787	320
자체처리	11,774	2,978	4,071	3,341	1,384

□ 금후계획

○ 공사 추진(연간 단가계약)	: ′23. 7. ∼ 12.

수질관리과  소관

□	노인·아동 다중이용시설 찾아가는 수질검사	----	17
□	깨끗하고 안전한 수돗물 공급 및 수질검사 강화	----	18
□	국가 공인 수질검사기관 효율적 운영	----	19
□	배수지·가압장 및 공업용수 노후시설 교체공사	----	20
□	상수도 시설물 정기 및 정밀 안전점검	----	21

수질분석팀

노인·아동 다중이용시설 찾아가는 수질검사

○ 면역력이 약하고 질병에 취약한 노인·아동이 수돗물을 안심하고

사용할 수 있도록 수질검사를 실시하여 불안감을 해소하고 안전성

검증으로 시민 만족도 향상

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023. 1. ∼ 12.

○ 사업대상 : 총 839개소

- 경로당 649개소, 지역아동센터 69개소, 유치원 111개소,  노인복지관 10개소

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 항목 (10개 항목)

○ 내    용

- 수도꼭지 위생상태 점검 및 잔류염소 농도 확인 병행

- 깨끗하고 안전한 수돗물 홍보 및 수질이상 발생시 대처방안 안내

- 노인 일자리를 활용(제공)하여 경제도 살리고 수돗물의 신뢰성 강화 및 시민의 위생안전 확보

□ 추진상황

○ 수질검사 사전안내 및 수질검사 일정 수립        : ′23. 2.

○ 월 85개소 이상 시료 채수 및 수도꼭지수 위생 상태 점검   : ′23. 3 ~  6.

- 6월말 기준 총168개소(경로당 6개소, 지역아동센터 63개소, 유치원 99개소)

○ 수질검사 결과 송부 및 수돗물에 대한 안전한 음용방법 컨설팅

- 수질 이상 발생 시 연락처 및 대처방안 안내

□ 금후계획

○ 노인·아동다중이용시설  671개소 수질검사 추가 추진 :  ′23. 7 ~ 12.

수질분석팀

깨끗하고 안전한 수돗물 공급 및 수질검사 강화

○ 과학적이고 체계적인 수질관리 및 현장 행정으로 시민과 함께하는      검증 등 확인을 통한 상수도 수질 안전성 확보

□ 사업개요

○ 상수원수 ∼ 수도꼭지수까지 공급 단계별 수질검사 확대

구 분	법 적 기 준	강 화 시 행
원 수 (상수원관리규칙 제24조)	매월 COD 등 7개항목 매분기 수은 등 31개항목	매월 40개항목
정 수 (먹는물수질기준및검사등에 관한규칙 제 4조)	매일 탁도 등 6개항목 1회이상 매주 대장균 등 7개항목 매월 비소 등 59개항목	매일 6개항목 6회 매주 15개항목 매월 61개항목 분기 46개항목 추가 (분기별 107개 항목 검사)
수도꼭지수 (먹는물수질기준및검사등에 관한규칙 제 4조)	월 77개소 잔류염소 등 4개항목	월 100개소 잔류염소 등 4개항목

□ 추진상황

○ 용담호 및 고산정수장 매월 정밀검사(한국수자원공사, 전주시)

○ 각 가정 및 상가 등 수도꼭지수 수질상태 표본조사 : 월100개소 이상

○ 수돗물 민원처리 :’23. 6월 현재 93건(수돗물 안심확인제 55/ 전화 38)

○ 공동주택 순차적 방문 종합검사 추진(깨끗한 수돗물 인중서 발급)

- ’18년(147개소), ’19년(156개소), ’20년(154개소), ’21년(157개소)

’22년(176개소), 23년 6월 현재 104개소 추진 완료

○ 수돗물 품질보고서 발간 : 210,000부(주민센터 배부, 홈페이지 공개)

□ 금후계획

○ 수돗물 안심 확인제 지속 추진 및 공동주택 수돗물 수질검사 실시

○ 노인·아동 다중이용시설 찾아가는 수질검사 지속 추진

수질분석팀

국가 공인 수질검사기관 효율적 운영

○ 수질검사 공인 검사기관의 효율적인 운영을 통하여 수돗물의

파수꾼 역할과 대시민 행정 서비스 강화

□ 사업개요

○ 공인 검사기관 공공성 및 신뢰성 확보를 위한 분석능력 제고

- 국내 108개 기관 대상 ’23 환경부 분석능력 평가 우수성적 거양

○ 먹는물의 안전성 확보로 시민의 건강 추구

- 수돗물, 약수터, 공원음수대, 수영장수, 목욕장수, 수경시설,

민방위 비상급수 시설 등 안전성 조사

※ 운영인력 6명(환경연구사 1, 환경 2, 화공 1, 의료기술 1)

□ 추진상황

○  ’23 환경부 분석능력평가 결과 국내 최상위 기관 선정 (’23.4월)

※ 환경부 국립환경과학원『먹는물 수질검사기관 제33호』지정 - ’00.7월

○ 먹는물 및 생활 속 물상태 철저한 검증 추진

- ’23년 6월 현재 총 검사건수 : 1,624건 (의뢰 452건, 자체 1,172건)

· 상수원 정수 (1,143), 상수도 원수 (48), 상수도 노후관 (33), 수돗물안심확인제 (55)

공동주택 수돗물 인증제 (104), 지하수 (123), 약수터 (12), 수영장수 (20)

목욕장수 (6), 수경시설 (69), 어린이집 (164)

□ 금후계획

○ 수질분석 능력 배양을 위한 자체 정도관리 강화

○ 현장방문 수질검사 서비스 강화를 통한 시민건강 증진

○ 연간 3,800여건 수질검사 의뢰 시료에 대한 신속한 처리

시설관리팀

배수지·가압장 및 공업용수 노후시설 교체공사

○ 상수도사업장 노후 시설물에 대한 개선 및 교체공사를 시행하여

예기치 못한 안전사고 예방으로 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023. 1. ∼ 12.

○ 사업대상 : 15개소(배수지 10, 정수장 1, 취수장 1, 가압장 3)

○ 사 업 비 : 300백만원

○ 사업내용 : 배수지, 가압장 및 공업용수 노후시설 교체

- 송·배수관로 보수, 펌프·밸브·전기설비 등 교체 및 개선

□ 추진상황

○ 22년 팔복정수장 삼양화성 펌프동 지붕판넬 설치공사 등 12건 실시

○ 노후 시설 교체를 위한 현장조사                      : ′23. 1.

○ 팔복배수지 광역분기 송수유량계 교체공사 등 6건 공사 추진 : ′23. 2. ~ 6.

□ 금후계획

○ 공사 추진                                      : ′23. 6. ~ 12.

시설관리팀

상수도 시설물 정기 및 정밀 안전점검

○ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 규정에 의거 상수도

시설물의 적정한 유지관리 및 재해·재난 사전예방, 시설물의

효율성 증진을 통한 수돗물 안정적 공급

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023. 1. ∼ 12.

○ 사업대상 : 12개소(배수지 10개소 및 정수장 1개소, 취수장 1개소)

○ 사 업 비 : 98백만원

○ 사업내용 : 상수도 시설물 팔복정수장 등 12개시설 정기 및 정밀안전점검

□ 추진상황

○ ’22년 팔복정수장 등 12개 시설 정기(12개소) 및 정밀안전점검(9개소) 실시

○ ’23년 상반기 정밀(서신·천마·인후) 및 정기(팔복정수장 등 9개소)    안전점검 추진 : ′23. 3. ~ 6.

□ 금후계획

○ ’23년 하반기 정기(팔복정수장 등 12개소)안전점검 실시 : ′23. 8. ~ 12.

하 수 과  소 관

□	생태도시 구현을 위한 하수관로 정비사업	----	23
□	팔복〔3,4분구〕처리구역 하수관로 정비사업	----	24
□	팔복 처리구역 하수관로 정비사업	----	25
□	전주시 하수도정비 기본계획 변경 수립	----	26
□	전주 공공하수처리시설(4단계) 증설	----	27
□	농촌마을 환경개선 하수도 정비사업	----	28
□	체계적 지하수시설 조사로 물자원 관리강화	----	29

하수시설팀

생태도시 구현을 위한 하수관로 정비사업

○ 쾌적한 생태도시 구현과 새만금 상류 수질개선에 기여하고, 오염 부하량

저감 및 불명수 감소로 하수처리 경영 합리화

□ 사업개요

○ 위    치 : 7개 처리구역 36개분구, 6개 지구, 취락지역 54개 마을 등

○ 사업기간 : 2002년 ∼ 2035년 (34년간)

○ 사 업 비 : 8,957억원(국비 50%, 도비 10%, 시비 35%, 기금 5%)

○ 사업규모 : 하수관로정비 1,015km, 배수설비 55,720개소

□ 추진상황

○ 2022년까지 완료(64%, 5,013억원) : 8개 구역

- 하수관로 정비 648.7km, 배수설비 36,066개소

○ 2023년 계속사업(26%, 3,676억원) : 9개 구역

- 하수관로 정비 271.9km, 배수설비 14,429개소

(단위 : km, 억원)

사 업 명		사업규모	총투자 규모	기투자액	2023년	2024년 이후	추진실적/계획
총 계		271.9	3,676	925	318	2,433
계 속 사 업 ︵ ’14 ~ ’26︶	팔복(1,2) :팔복동	32.6	279	231	20	28	-공사 중(’24.2월 완료) -공정률 68%
	중앙(9,10) :중앙동, 풍남동, 노송동	33.7	498	191	58	249	-공사 중(’25.3월.완료) -공정률 25%
	중앙(8) :중앙동, 풍남동	22.3	356	186	36	134	-공사중(’24.9월.완료) -공정률 55%
	화산(1,2,7) :완산,서학,삼천,평화,효자,우아	33.5	496	169	64	263	-공사중(’26.6월.완료) -공정률 15%
	중앙(6,7) :중앙동, 진북동	40.4	496	103	57	336	-공사착공(’23.3월) -공정률 3%
	아중(2분구) 및 편입구역 :호성동, 우아동	33.2	364	17	6	341	-설계용역 중(’23.6.완료) -공사발주(’23.하반기)
	팔복(3,5,6,분구) :조촌동, 여의동	21.5	314	0	20	294	-설계발주(’22.상반기) -설계완료(’23.12. 완료)
	안행·평화 :삼천동, 효자동, 평화동	17.8	379	28	37	314	-공사착공(‘23.6월)
신규	팔복(3,4분구) :여의동, 팔복동	36.9	494	0	20	474	-설계발주(’23.상반기) -설계완료(’24.12. 완료)

□ 금후계획

○ 잔여 사업(11%, 268억원) 계속 추진 : ~ ’35년 까지

- 하수관로 112.2km, 배수설비 5,787개소

하수시설팀

팔복[3,4분구] 처리구역 하수관로 정비사업

○ 여의동, 팔복동 일원의 하수관로 정비사업 추진으로 악취 저감 등 지역 주민 불편해소 및 주거환경 개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 팔복동, 여의동 일원

○ 사업기간 : 2023년 ∼ 2028년 (6년간)

○ 사 업 비 : 494억원(국비 60%, 도비 20%, 시비 16%, 기금 4%)

○ 사업규모 : 하수관로정비(우·오수 신설 및 개량) L=36.9km

※ 배수설비 671개소, 기타부대시설 1식

□ 추진상황

○ ’22년 신규사업 신청(환경부)	: ’22. 3

○ ’23년 신규사업 예산 확보(국3.6억, 도1.2억, 시15억)	: ’23. 1

○ 행정절차 이행(계약심사, 원가심사, 일상감사)	: ’23. 5

○ 용역 발주 및 세부기준 수립	: ’23. 6

□ 금후계획

○ 사업수행능력평가 추진	: ’23. 7.

○ 용역 착수 및 추진	: ’23. 8. ~ ’24. 12.

○ 공사발주 및 추진	: ’25. 1. ~ ’28. 12.

하수시설팀

팔복 처리구역 하수관로 정비사업

○ 팔복처리구역 내 공업단지의 하수관로정비사업 추진으로 방류하전의 수질개선 및 악취 저감 등 지역 주민 불편해소 및 주거환경 개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 팔복동 1,2산단 일원

○ 사업기간 : 2023년 ∼ 2028년 (6년간)

○ 사 업 비 : 376억원(국비 60%, 도비 20%, 시비 16%, 기금 4%)

○ 사업규모 : 하수관로정비(우·오수 신설 및 개량) L=17.4km

※ 배수설비 972개소, 기타부대시설 1식

□ 추진상황

○ ’23년 실시설계 예산편성(시 10억)	: ’22. 12.

○ 사업수행능력평가 세부기준 수립	: ’23.  6.

□ 금후계획

○ 실시설계 용역사업수행능력평가 및 추진	: ’23. 9. ~ ’24. 12.

- 하수관로 정비계획 수립, CCTV 및 배수설비 조사

- 재원협의 및 공공하수도 설치인가 등 절차이행

○ 공사 계약심의, 원가심사, 일상감사 등	: ’25. 1. ~ 2.

○ 공사발주 및 추진	: ’25. 3. ~ ’27. 12.

하수시설팀

전주시 하수도정비 기본계획 변경 수립

○ 지속적인 도시개발, 관광개발 사업으로 인한 인구증가와 도시재정비 개발사업 등으로 하수 발생량이 증가하여 관로의 신설, 공공하수처리시설의 증설계획 수립

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내 일원

○ 사업기간 : 2023년 ∼ 2025 (3년간)

○ 사 업 비 : 40억원(시비 100%)

○ 사업규모 : 하수도 기본계획 수립, 대장작성, 유량 및 수질조사 등

□ 추진상황

○ 하수도 정비기본계획 변경용역 착수	: ’15. 2

○ 기본계획 부분변경(하수처리시설) 승인	: ’15. 12

○ 관련부서, 완주군 협의	: ’16. 9

○ ’17년 하수도 정비기본계획 변경 수립	: ’17. 3

□ 금후계획

○ 하수도 정비 기본계획 세부기준 수립	: ’23. 8.

○ 용역발주 및 사업수행능력평가 추진	: ’23. 9. ~ 10.

○ 용역착수 및 추진                               : ’23. 11 ~ ’25. 11.

하수정비팀

전주 공공하수처리시설(4단계) 증설

○ 에코시티, 효천지구 택지개발 및 향후 도시개발에 따른 유입하수량

및 오염부하량 증가에 따른 공공하수처리시설 증설 필요

* 국무총리 주재 제16차 새만금위원회에서 새만금 목표수질 달성을 위한 추가 보완대책 발표(2015. 12. 4.)

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 고내천변로 58일원(전주 환경사업소 내)

○ 기    간 : 2017년 ∼ 2026년 (10년간)

○ 사 업 비 : 794억원(국비 308, 도비 154, 시비 332)

○ 사업규모 : 증설용량 36,000㎥/일(403,000㎥/일 ⇨ 439,000㎥/일)

□ 추진상황

○ 하수도정비 기본계획 (변경)수립	: ’17. 3.

○ 사업계획 적정성 검토(공공투자관리센터)	: ’18. 10.

○ 위·수탁 협약체결(전주시⇔한국환경공단)	: ’19. 12.

○ 총사업비 조정(기재부, 환경부)	: ’20. 9.

○ 기본설계 완료(하수처리 공법심의, 선정)	: ’22. 3.

□ 금후계획

○ 실시설계완료 및 설계경제성 검토(VE), 설계자문	: ’23. 7. ~ 10.

○ 재원협의(환경부) 및 총사업비 변경조정(기재부)	: ’23. 11.

○ 설치인가, 원가심사 등 절차이행 및 공사발주	: ’24. 1. ~ 2.

○ 공사 공고 및 계약	: ’24. 3. ~ 4.

○ 공사착수 및 추진	: ’24. 5. ~ ’27. 05.

하수정비팀

농촌마을 환경개선 하수도 정비사업

○ 농촌마을에 오수관을 설치하여 생활오수를 깨끗이 처리함으로써

주민들의 삶의 질 향상 및 새만금 상류지역 수질개선 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 관내 농촌마을 일원

○ 사업기간 : 2005년 ∼ 2024년(20년간)

○ 사 업 비 : 52,780백만원(국비 70%, 시비 25%, 기금 5%)

○ 사업규모 : 22개 지구(처리시설 710㎥/일, 관로 84.9km)

□ 추진상황

○ 2022년 20개지구 (91%, 46,176백만원)

- 10개 소규모처리장(처리시설 635㎥/일, 관로 33km), 10개 연계처리(관로 45.2km)

○ 2023년 2개지구 시행 (9%, 6,604백만원)

- 1개 소규모처리장(처리시설 75㎥/일, 관로 3.8km), 기존소규모처리장 연계처리(관로 2.9km)

(단위 : km, 백만원)

사 업 명		사업규모	총투자 규모	(추진실적/계획)
총 계		6.7km Q=75㎥/일	6,604
계속 사업 (2018. ~ 2024.)	신기지구 (조촌동)	3.8km (Q=75㎥/일)	4,390	•착 수 : 2020. 12. 24. •공 정 : 74% •공 사 중 : 2023.12월 완료예정
	아중.용계지구 (우아동)	2.9km	2,214	•공사발주 : 2023. 2. •공사추진 : 2023. 3. ~ 2023. 12.(2차분) : 2024. 3. ~ 2024. 6.(잔여분)

□ 금후계획

○ 사업추진(계속사업)	: ’23. 7. ~ ’24. 6.

지하수관리팀

체계적 지하수시설 조사로 물자원 관리강화

○ 지하수시설에 대한 체계적인 관리 강화로 적정한 지하수 개발․
이용을 도모하고 수질오염 예방 및 물 부족 상황에 적극 대비

□ 주요현황

○ 지하수시설 등록현황 (2023. 6월 기준)

(단위 : 개소)

구 분	총 계	생활용수			농업용		공업용
		소계	음용수	비음용수
계	6,855	3,620	281	3,339	3,168	67
신 고	6,587	3,493	266	3,227	3,062	32
허 가	268	127	15	112	106	35

○ 주요업무

- 하수도사용료 부과대상 조사 및 계량기 설치․고장 여부 조사

- 미신고․허가 지하수시설 발굴 및 시설물 실태 파악

- 지하수시설 불용공, 미사용, 행불, 고장, 방치 여부 조사 등

-『지하수통합 정보관리시스템』운영 활성화

□ 추진상황

○ 지하수 공인유량계 신설 및 교체 (교체 11개소, 신설 52개소)

○ 검침곤란 시설 옥외검침시스템 유지보수 및 현장조사 (714개소)

- 계량기 미부착 가구 공인유량계 설치, 방치공 처리안내 등

○ 지하수 보조관측망 설치 및 운영 : 총 24개소 운영(신규 2개소 공사 중)

□ 금후계획

○ 지하수 의심 사용가·다량 사용가에 대한 지속적 점검 관리

○ 공인유량계 신설·교체 및 옥외검침시스템 사후 유지관리