제407회 전주시의회 임시회 복지환경위원회

2024년도

주요업무계획

	자원순환본부

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	3
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	4
□	기 본 현 황		-------	5
□	주요업무 추진상황
	○	자원순환과	-------	8
	○	청소지원과	-------	13
	○	녹지정원과	-------	19
	○	산림공원과	-------	24

일  반  현  황

□ 기   구 : 4과 15팀

						자 원 순 환 본 부
자원순환과 (4팀)								청소지원과 (3팀)								녹지정원과 (4팀)								산림공원과 (4팀)
자원순환								청소지원								녹지정책								산림정책
소각시설								재활용								녹지조성								산림보호
자원시설운영								폐기물관리								정원산업								공원조성
운영지원																정원관리								장기미집행도시공원보상TF팀

□ 정‧현원

과 별		총 계	일 반 직						별정	기능
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	66	1	4	17	25	14	5
	현 원	73	1	4	15	24	19	10
자원순환과	정 원	19	1	1	5	8	2	2
	현 원	19	1	1	4	5	7	1
청소지원과	정 원	17		1	3	8	4	1
	현 원	17		1	3	6	6	1
녹지정원과	정 원	15		1	5	5	3	1
	현 원	18		1	4	6	2	5
산림공원과	정 원	15		1	4	4	5	1
	현 원	19		1	4	7	4	3

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
자원순환과	○ 새활용센터, 자원순환 특화단지, 대형폐기물 선별장 운영·관리 ○ 신규소각장 건립사업 추진 ○ 폐기물처리시설 운영 및 유지관리 ○ 매립장, 소각장, 리싸이클링타운 주민지원협의체 운영
청소지원과	○ 청소행정 종합계획 수립 및 조정 ○ 생활폐기물 수거 체계 및 안정적 청소행정 구축 ○ 직영환경관리원 노동조합 관리 및 교섭 ○ 올바른 분리배출 문화정착을 통한 자원선순환 정책 추진 ○ 폐기물처리업 인․허가, 슬레이트 개량사업
녹지정원과	○ 정원 및 도시녹지 조성․관리사업 총괄 ○ 도시숲·바람길숲·탄소저장숲 등 숲 조성사업 추진 ○ 도시녹지 확충 및 조경사업 추진 ○ 정원산업 전반에 관한 사항 및 정원산업박람회 ○ 전주 지방정원 조성, 꽃도시 조성 및 양묘장 관리
산림공원과	○ 산림휴양 기반시설 확충 및 개발 ○ 산불, 산사태 예방활동 등 안전한 산림관리 ○ 산림보호 지도·단속 및 자원 조성·관리 ○ 장기미집행 도시공원 관리 및 공원 조성사업 추진 ○ 공원조성계획 결정 및 변경(도시공원위원회 구성·운영)

기  본  현  황

□ 운영중인 폐기물 처리시설 : 5개소

시 설 명	위 치	운영기간	면 적	용 량	비고
전주권 광역1단계 쓰레기매립장	이서면 선비로 1363-92	’97.12.1. ～ ’06.6.30	135,000㎡	1,925,000㎥
전주권 광역2단계 쓰레기매립장	이서면 선비로 1363-92	’06.7.10 ～ 매립종료시까지	86,700㎡	990,000㎥
전주권 소각자원센터	완산구 정여립로 625	’06.9.30. ～ ’26.9.29.	98,786㎡	310톤/일
자원순환특화단지	완산구 정여립로 651	’13.12. ～	80,009㎡ (12필지, 11개 업체)	공공폐수처리시설 230㎥/일
전주시 종합 리싸이클링타운	완산구 삼천동 3가 749-5 일원	’16.11.1. ～	대지: 44,160㎡ 건물: 12,125㎡	음식물 300톤/일 재활용 60톤/일 하수슬러지 자원화 150톤/일

□ 청소인력 : 629명(직영 202, 대행 427)

구분 구별		합계	일반 단독	일반 공동	음식물 단 독	음식물 공 동	재활 용품	대 형 폐기물
합 계	총 계	629	371	42	58	31	86	41
	직 영	202	202	-	-	-	-	-
	대 행	427	169	42	58	31	86	41

□ 청소차량 : 242대(직영 46, 대행 196)

구분 구별		합계	일반 단독	일반 공동	음식물 단 독	음식물 공 동	재활 용품	대 형 폐기물
합 계	총 계	242	76	21	54	23	51	17
	직 영	46	46	-	-	-	-	-
	대 행	196	30	21	54	23	51	17

□ 소유별 임야면적                             (단위:㏊)

총 계	사유림	국유림	공유림	비 고
6,249	5,415	677	157

□ 보전산지 현황                                (단위:㏊)

계	보전녹지	자연공원	문 화 재 보호구역	조 수 보호구역	사찰림	사방지	비고
4,460	3,760	623	25	23	28	1

□ 산불방지 시설․장비

산림면적	감시시설		산불진화 및 감시인력	진화장비
	감시탑	무인감시 카메라		진화차	무전기	기 타
6,249ha	23개소	4대	143명 - 전문진화대 64 - 기계화진화대 19 - 감 시 원 60	5대	121대	39종, 4,073여점

□ 보호수 및 노거수 현황                     (단위:그루)

구 분	계	느티나무	왕버들	은행나무	팽나무	회화나무	참죽나무	주엽나무
보호수	25	9	6	7	1	1	1
노거수	57	22	21	2	10	1		1

□ 공원 분포현황

구분	전주시 전체		공 원 면 적			공 원 결정률 (C/A)	1인당 공원면적
	면적(A)	인구(B)	결정(C)	조성(D)	조성률 (D/C)		결 정 (C/B)	조 성 (D/B)
계	206.3㎢	656천명	22.43㎢	6.16㎢	27.43%	10.87%	34.21㎡	9.4㎡

□ 공원현황                              (단위 : 개소, ㎡)

공원의 종 류		공 원 수			공 원 면 적			비고
		계	완산	덕진	계	조 성	미 조성
계		259	143	116	22,430,446	6,159,590	16,270,856
도립공원		1	1		5,608,490	939,069	4,669,421	모악산
도시공원 총계		258	142	116	16,821,956	5,220,521	11,601,435
생활권공원	소 계	246	136	110	14,403,209	4,591,241	9,811,968
	근 린 공 원	62	34	28	14,049,963	4,255,652	9,794,311
	어린이공원	139	80	59	307,712	297,262	10,450
	소 공 원	45	22	23	45,534	38,327	7,207
주제공원	소 계	12	6	6	2,418,747	629,280	1,789,467
	역사공원	3	3		1,696,649	85,005	1,611,644	산성,중앙,성곽
	문화공원	5	2	3	82,737	82,737		태평,곰솔나무,팔복,만성,혁신
	수변공원	2		2	209,840	209,840		기지제, 만성
	묘지공원	1	1		412,123	234,300	177,823	효자묘지
	반려동물공원	1		1	17,398	17,398		첨단산단3-1

※ 쌈지공원(도로개설 잔여지 등) : 94개소(완산 60, 덕진 34), 42,014㎡

□ 공원시설물 현황                              (단위 : 개)

합 계	편의시설	운동시설	화장실	어린이 놀이시설	공원등	보안시설 (CCTV)	비 고
16,038	6,766	2,480	80	726	5,635	351

□ 녹지시설물 현황

완충․경관․연결녹지	만경강생태숲	가로수	가로화단
224개소 772천㎡	22.4㎞ 25,521그루	288개노선 64,332그루	266개노선 425천㎡

자원순환과  소 관

□	『전주시 새활용센터 다시봄』 운영	----	9
□	친환경 광역소각자원센터 신규 건립	----	10
□	폐기물처리시설 안정적 운영관리	----	11
□	바이오가스 기반 수소융복합사업	----	12

자원순환팀

『전주시 새활용센터 다시봄』 운영

○ 버려지는 폐기물의 새활용을 통한 자원순환 문화 형성‧확산 및 새활용 산업 도심 거점공간 운영

○ 새활용 산업지원 및 발굴 육성으로 자원순환 산업기반 조성과 유통판로 개척 지원 등 자원순환 생태계 구축

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 기린대로 200-5 (선미촌 내)

○ 운 영 비 : 연382백만원

○ 수탁기관 : ㈜사람과환경(대표 강재원) / ’23. 7. ∼ ’25. 12.

○ 사업내용 : 새활용 문화확산 및 새활용 산업 지원을 통한 활성화

□ 추진상황

○ 새활용 교육 및 체험프로그램	: 120회 / 2,820명

○ 새활용 미술작품 전시	: 10회(상설 4, 기획 6)

- 해양쓰레기를 소재로한 새활용 브랜드(스몰 액션) 협업 전시 등

○ 기관 및 단체 관람객 새활용센터 탐방	: 60팀 / 1,121명

○ 입주기업 브랜드 컨설팅 및 제작·판매 교육	: 14회

- 영화관(CGV) 폐의자를 활용한 파우치 제작, 새활용 드럼 제작 지원

- 입주기업 폐현수막 활용 악기용 인조가죽 개발(지속가능발전 공모전 수상)

○ 새활용 자원순환의 날 기념 행사	: ’23. 9. 2.

□ 추진계획

○ 찾아가는 새활용 체험프로그램 운영(학교 등)	: ’24. 1. ∼ 12.

○ 새활용 교육 확산을 위한 전문 강사 양성	: ’24. 1. ∼  3.

○ 자원순환 실천 챌린지를 통한 시민 홍보	: ’24. 3. ∼ 12.

○ 폐기물처리시설 현장 교육을 통한 새활용 문화 정착	: 연중

○ 새활용 산업지원 및 기획전시 추진 등	: 연중

소각시설팀

친환경 광역소각자원센터 신규 건립

○ 현 소각자원센터 운영기한(’26. 9.) 도래됨에 따라 전주 광역권 생활폐기물의 안정적인 소각처리를 위해 신규 이전 부지 입지공모 등 신규 건립 추진 (※ 전주 광역권 : 전주, 김제, 완주, 임실)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023. ∼ 2028. (6년)

○ 위    치 : 완산구 정여립로 625 (현 소각시설 부지)

○ 사업규모 : 생활폐기물처리 550톤/일

○ 총사업비 : 4,499.72억원(국 2,249.86, 시 2,249.86)

※ ’24년도 국고보조금 업무처리지침 반영(주민편익시설(703.78억), 지하화(1.4배))

【현 전주권 광역소각자원센터 현황】

◦위    치 : 전주시 완산구 상림동(반입시군 : 전주, 김제, 완주, 임실)  ◦시설규모 : 310톤/일(실 처리용량 : 243톤/일)

◦설 치 일 : 2006. 9. 29.                             ◦운영기한 : 20년(2026. 9월까지)

□ 추진상황

○ 전라북도 자원순환시행계획 반영	: ’21.  4. 23.

○ 한국환경공단 기술진단 (신규 건립 타당)	: ’21.  3. ∼ 11.

○ 신규 시설 타당성조사용역 (550톤/일 적정)	: ’21.  3. ∼ 12.

○ 입지선정계획 결정·공고 (입지후보지 3개소 접수)	: ’23.  3. ∼ 06.

○ 입지선정위원회 구성 및 운영	: ’23.  8. ∼ 12.

- 입지후보지 타당성조사 용역 추진	: ’23. 10. ∼ 12.

- 최종 입지 선정 의결	: ’23. 12. 26.

□ 추진계획

○ 폐기물처리시설 입지 결정·고시	: ’24. 2.

○ 기본계획, 예타면제, 중앙투자심사, 재원협의	: ’24.

○ 기본 및 실시설계, 환경·재해영향평가 등	: ’25.

○ 폐기물처리시설 설치계획 승인 및 공사추진	: ’26. ∼ ’28.

자원시설운영팀

폐기물처리시설 안정적 운영관리

○ 각 폐기물처리시설에 대한 점검과 운영관리로 생활쓰레기 등 각종

폐기물의 안정적인 처리를 통해 청소행정에 만전을 기하고 자원화를

도모함으로서 자원순환체계 구축

□ 시설개요

구 분	소각장	매립장(2단계)	리싸이클링타운
용량·규모	310톤/일 (155톤/일×2기)	990,000㎥	음식물 300톤/일, 재활용선별 60톤/일
반 입 량	276톤/일 ∙ 4개 시·군 생활쓰레기 반입 (전주,김제,완주,임실)	148톤/일 ∙ 소각재(48톤/일) ∙ 매립용생활쓰레기(21톤/일) ∙ 노면청소차(31톤/일) ∙ 리싸이클링타운협잡물 등(12톤/일) ∙ 복토재(36톤/일)	343톤/일 ∙ 음식물류폐기물(250톤/일) ∙ 재활용품(93톤/일) - 단독 : 40톤/일 - 공동 : 53톤/일(매각)
운영현황	민간위탁 한종산업개발(주), (유)일토씨엔엠 (’22.7. ~ ’25.6.)	직영 *매립 및 정비 : 금록건설(주) (’21.7. ~ ’26.6.)	BTO 전주리싸이클링에너지(주) (’16.11. ~ ’36.11.)

□ 추진상황 및 계획

○ 전주권 광역매립장 순환이용 정비사업(총863억원/국 431, 시 432)

- 기본 및 실시설계 용역	: ’23. 8. ~ ’24. 5.

- 매립폐기물 선별 공법 적용여부 검토	: ’24. 1. ~ ’24. 2.

- 순환이용 정비사업 추진	: ’25. ~ ’27.

○ 리싸이클링타운 악취방지시설 개선사업(38억원)

- 악취기술컨설팅(시행사)	: ’22. 12. ~ ’23.  5.

- 실시설계 용역(시행사)	: ’23. 11. ~ ’24.  2.

- 개선공사비 협의(전주시, 시행사)	: ’24.  2. ~ ’24.  4.

- 악취방지시설개선공사 추진(전주시, 시행사)	: ’24.  7. ~ ’24. 12.

자원시설운영팀

바이오가스 기반 수소융복합사업

○ 전주시 종합리싸이클링타운에서 발생하는 바이오가스를 기반으로 수소융복합사업(수소생산, 연료전지발전)을 통한 수소 시범도시 구축

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 삼산길 51-24(리싸이클링타운 인접부지 28,579㎡)

○ 사업기간 : 2021. ∼ 2025.

○ 총사업비 : 1,300억원(국 35, 시 60, 민 1,205)

- 고질화시설 : 70억원(국 35, 시 35) - 부지매입 : 25억원(시 25)

- 수소연료전지 : 1,205억원(민간 1,205) / 한수원(SPC)

○ 사업내용 : 음식물 바이오가스를 활용한 수소 생산 및 발전

- (전주시) 바이오가스 고질화시설 설치(메탄 순도 향상 : 60% → 96%)

- (한수원) 수소 생산시설(600kg/일) 및 수소연료전지 발전(19.64MW)

□ 추진상황

○ 환경부 공모사업 선정(바이오가스 고질화시설)	: ’21.  1.

○ 수소융복합사업 추진 공동개발업무협약 체결	: ’21. 12.

- 참여기관 : 전주시, 전주시의회, 한국수력원자력, 태영건설, 전북도시가스

○ 공유재산관리계획 승인	: ’22.  5.

○ 기본 및 실시설계용역 지방건설기술심의	: ’22. 10.

○ 기본 및 실시설계용역	: ’23.  1. ~

○ 한수원 SPC(전주바이오그린에너지(주)) 설립	: ’23.  5.

○ 사업부지 매입(7필지, 27,441㎡)	: ’23.  6.

□ 추진계획

○ 기본 및 실시설계 용역 준공                   : ’24. 4.

○ 공사 착공 및 준공	: ’24. 5. ~ ’25. 5.

청소지원과  소 관

□	효율적 수거체계 시행으로 쾌적한 도심 환경 조성	----	14
□	쓰레기 불법투기 단속 강화 체계 구축	----	15
□	생활폐기물 일몰제 및 재활용품 요일별 배출제 실시	----	16
□	1회용품 줄이기 등 쓰레기 감량화 추진	----	17
□	사업장 폐기물 적정 관리	----	18

청소지원팀

효율적 수거체계 시행으로 쾌적한 도심 환경 조성

○ 현행 생활폐기물 수거 체계의 권역별 불균형 등 미비점 보완 개선을 통해 청소행정 효율성 향상 및 시민 편익 증진

□ 수거 체계 운영현황

성상 수거체계 (’22. 7. ~ ’23. 6.)
종량제 · 가로	직영 23개동
	대행 4구역
음식물류폐기물	대행 4구역
재활용품	대행 2구역
대형폐기물	대행 2구역

권역 수거체계

(’23. 7. ~ ’24. 6.)

(직영) 23개동

가로청소 유지

(대행) 성상 구분없는

12개 권역

책임 청소 체계

개선 권역 수거체계 (안)

(’24. 7. ~ ’26. 6.)

(직영) 단독 수행

권역 구성

(대행) 권역 조정으로

권역별 불균형 해소

⇨

⇨

○ 수거방식 : 권역 수거 책임제

○ 근로자수 : 629명   (직영 202명   / 대행업체 근로자 427명)

○ 소요예산 : 796억원 (직영 202억원 / 대행업체 594억원)

○ 주요개선 필요사항

- 대형·소형 권역 조정 실시 권역별 불균형에 따른 문제 해소

- 직영·대행 혼합 권역 조정으로 권역별 청소 책임성 확보

□ 추진상황

○ 23년 생활폐기물 수집·운반 체계 개선(성상 → 권역)	: '23. 7.

○ 23년 생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 용역 추진	: '23. 10. ∼

○ 24년 생활폐기물 수집·운반 대행 원가산정 용역 추진	: '23. 10. ∼

□ 추진계획

○ 24년 생활폐기물 수집·운반 대행 원가산정 용역 준공	: '24. 2.

○ 24년 생활폐기물 수집·운반 대행업체 용역 입찰	: '24. 2.

○ 24년 수집·운반 대행 용역 수거 준비완료 보고서 징구	: '24. 4. 30.한

○ 24년 생활폐기물 수집·운반 대행용역 추진	: '24. 7.

○ 24년 생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 용역 추진	: '24. 8.

청소지원팀

쓰레기 불법투기 단속 강화 체계 구축

○ 지속적이고 체계적인 단속을 통한 불법투기 감량 관리 및 시민참여를 통한 시민의식 개선으로 쾌적한 도심환경 조성

□ 단속 현황

○ 단속 건수 및 과태료(2023)

구분	계도	과태료 부과	비고
계	4,155	1,362건(150백만원)
민원 신고	-	631건(55백만원)	국민신문고 등
상시단속반	4,155	731건(95백만원)

○ 불법투기 감시카메라 현황

구분		계	고정식 블랙박스형	이동식 블랙박스형	이동형 감시카메라	관제형
전주시		571	203	36	90	242
	완 산	257	76	18	45	118
	덕 진	314	127	18	45	124

*단속결과 : 과태료 150건/20백만원 (완산 133건/17백만원, 덕진 17건/3백만원)

□ 추진상항

○ 불법투기 상시단속반 운영(9명-완산6, 덕진3) : '23.11.∼'24.11

- 시범 운영('22.10.∼'23.10. / 8명)

○ 중점관리구역 운영	: 전북대 원룸촌 등 취약지 15개소

○ 민·관 합동 캠페인 및 단속실시(월 1회 이상)	: 15회 / 637명 참여

- 민간참여 : 완산시민경찰연합회 80여명, 시민활동가 20여명

□ 추진계획

○ 신고포상금 지급 기준 정비(폐기물조례 시행규칙 개정)	: '24. 2. ∼

○ 민관 합동(시민단체*·구·동) 단속 지속 추진 및 확대	: '24. 2. ∼

*덕진시민경찰연합회 등 시민단체 참여 협의 및 독려

청소지원팀·재활용팀

생활폐기물 일몰제 및 재활용품 요일별 배출제 실시

○ 생활폐기물을 지정된 시간에 배출하고 재활용품을 요일별로 배출하여 도시 미관을 개선하고 효율적 수거 및 자원 재활용률을 향상하고자 함

□ 현 실태

○ 기 시행중인 생활폐기물 일몰 후 배출제도 시민의식 부족으로 미정착

○ 상시적으로 배출된 폐기물의 수거 이후 방치로 도시미관 저해

○ 재활용품 혼합 배출로 재활용률 저하 및 처리비용 증가

□ 사업개요

○ 시 행 일 : 2024. 7. 1.

○ 사 업 비 : 110백만원(홍보비)

○ 대    상 : 단독주택 및 상가 등 112,230세대(전체세대 중 38%)

○ 사업내용

[일몰 후 배출제] : 수거 전일 오후 6시 ∼ 수거일 오전 6시 배출

[재활용품 요일별 배출제] : 지역별 주2회(월·수 또는 일·화) 배출

- 배출예시

구 분	일	월	화	수	목	금	토
가 지역	X	플라스틱, 병류, 금속류, 스티로폼	X	투명페트병, 비닐류, 종이류, 스티로폼	X	X	X
나 지역	플라스틱, 병류, 금속류, 스티로폼	X	투명페트병, 비닐류, 종이류, 스티로폼	X	X	X	X

□ 추진상황

○ 제도 및 시행안 마련	: '23. 9. ∼ '24. 1.

- 타 지자체 벤치마킹, 업체 의견 청취, 배풀품목(안) 검토 등

○「전주시 폐기물 관리 시행규칙」 개정	: '24. 1. 19.

□ 추진계획

○ 제도 홍보(언론홍보, 설명회, 환경교육 등)	: '24. 2. ∼ 12.

- 다각적·지속적 홍보를 통해 제도 인식 확산 및 시민불편 최소화

○ 시범 실시 및 제도 보완(3개소*)	: '24. 4. ∼ 6.

*완산·덕진 주택가 각 1개소, 모텔·상가 밀집지역 1개소

○ 생활폐기물 일몰제 및 재활용품 요일별 배출제 시행	: '24. 7. 1.

- 제도 조기 정착을 위한 계도 기간(1~2개월) 운영 후 강력 단속(과태료 부과 등)

재활용팀

1회용품 줄이기 등 쓰레기 감량화 추진

○ 시민들이 자발적으로 1회용품을 감량할 수 있도록 시민 체감형 정책을 시행하여 생활속 1회용품 줄이기 문화를 정착시키고자 함

□ 현    황

○ 1회용품 발생현황 : 703,327톤/년 (1인 1.12kg/월, 2022년)

○ 1회용품 사용규제 현황

- 규제품목 : 1회용컵·플라스틱 빨대 등 21종

※ 종이컵 사용금지 규제 제외 및 플라스틱 빨대 계도기간 연장(’23.11.)

- 규제대상업종 : 식품접객업, 집단급식소 등 17개 업종(13,000여 업소)

□ 추진상황

○ 1회용품 사용 줄이기를 위한 친환경 소비문화 확산

- 1회용품 없는 날 캠페인 전개(매월 10일)	: 13회

- 1회용품 사용억제 대상사업장 지도·점검	: 215개소

- 1회용품 줄이기 및 올바른 분리배출 교육	: 110기관 (6,500명 )

○ 시민활동가 및 시민강사 양성	: 67명

○ 1회용품 없는 조직문화 만들기 업무협약 체결	: 6개 기관

- 건강보험심사평가원 전주지원('23.2.), 완산·덕진소방서('23,3.),

전주MBC('23,4.), 한국출판문화진흥원('23,6.), 전북개발공사('23,8.)

○ 1회용품 없는 장례문화 확산 업무협약 체결 및 지원사업 추진	: 4개 장례식장

□ 추진계획

○ 1회용품 줄이기를 위한 시민참여 홍보·교육 확대	: '23. 2. ~ 12.

- 시민 중심의 1회용품 줄이기 캠페인 및 교육(대학교 등 대상 확대)
- 1회용품 없는 조직문화 만들기 협약체결기관 지속 발굴

○ 1회용품 없는 장례문화 확산 지원사업 확대	: '24. 5. ~

- 1회용품 줄이기 우수업소 지정 및 인센티브 지원을 통한 참여 확산

- 지속가능한 사업추진을 위한 예산확보 노력

('24년 하반기 : 도비 및 추경예산 확보, '25년: 국가예산 확보)

○ 1회용품 사용억제 대상사업장 지도·점검 지속 추진

폐기물관리팀

사업장 폐기물 적정 관리

○ 시민생활과 밀접한 관련이 있는 사업장폐기물의 적절한 지도·점검·관리로 부적정 처리를 예방하고, 자원순환 활성화를 통하여 쾌적한 도시환경 조성

□ 현    황

구 분	허 가					신 고
	폐기물처리업			건설폐기물처리업		폐기물처리신고		폐기물 배출사업장
계	수집․운반	처분	재활용	수집‧운반	중간처리	재활용	수집‧운반
905	134	2	23	22	5	14	16	689

○ 폐기물 수집·운반·처리기준 준수여부 관리	: 216개소

○ 사업장‧건설폐기물 배출자 보관․배출기준 사전관리	: 689개소

□ 추진상황

○ 사업장·지정·건설폐기물처리업 및 배출자 신고 관리	: 2,019건

○ 폐기물처리업 등 현장 지도점검	: 102개소

- 행정처분 12건, 고발 5건, 과태료 12건(17,500천원)

○ '23년 슬레이트 건축물 철거 및 지붕개량 : 철거 130동, 개량 15동

□ 추진계획

○ 폐기물처리업 및 사업장폐기물 배출업소 허가·신고 관리

○ 폐기물 배출업소 및 처리업체 지도점검

- 폐기물의 수집·운반, 보관, 처리기준 적정 여부 점검

- 민원 발생, 반복 적발 등 문제사업장 위주 중점 점검

- 폐기물 불법처리 및 방치폐기물 발생 예방을 위한 특별점검 병행

○ 주택 슬레이트 철거 및 지붕 개량사업 추진

- 사업기간 : '24. 2. ~ 12.

- 사업규모 : 철거 161동, 개량 50동

- 사 업 비 : 821,760천원(국비 410,880 확보, 시비 추경예산 확보 필요)

녹지정원과  소 관

□	도시숲 조성	----	20
□	시민과 함께하는 정원문화 확산	----	21
□	전주 지방정원 조성	----	22
□	정원식물 지원센터(양묘장) 이전	----	23

녹지조성팀

도시숲 조성

○ 도심 내 유휴지에 다양한 유형의 숲을 조성하여 미세먼지 저감 및 열섬현상 완화로 쾌적한 생활환경 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 관내 공원, 녹지, 가로화단, 자투리땅, 학교 등

○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 6,305백만원(국비 1,200, 도비 1,810, 시비 3,295)

○ 사업내용 : 도심 내 녹지량 확충 및 열섬현상 완화, 미세먼지 저감 등 생활환경 개선을 위한 녹색 숲 및 쉼터 조성

□ 추진상황

○ '23년 도시숲 등 조성관리사업 완료(19개소)        : '23. 1. ~ 12.

- 전주천동로 등 도시숲 14개소, 명상숲 2개소, 가로수 3개소

○ '23년 탄소저장숲 조성관리사업 완료(4개소)	: '23. 1. ~ 12.

- 완충녹지 6호 및 9호, 세병공원, 화정공원

○ '24년 도시숲 등 조성관리사업 실시설계용역 추진	: '23. 11. ~ '24. 2.

○ '24년 탄소저장숲 조성관리사업 실시설계용역 추진	: '23. 12. ~ '24. 3.

□ 금후계획

○ '24년 도시숲 등 조성관리사업 추진(22개소)

- 도시숲 조성사업(가련산로 등 15개소)	: '24. 2. ~ 11.

- 명상숲 조성사업(삼천초, 오송중)	: '24. 2. ~ 6.

- 가로수 조성사업(안덕원로 등 5개소)	: '24. 2. ~ 6.

○ '24년 탄소저장숲 조성관리사업 추진(붓내공원 등 6개소)	: '24. 3. ~ 11.

정원산업팀

시민과 함께하는 정원문화 확산

○ 시민들이 정원을 쉽게 접하고 스스로 가꿀 수 있는 환경을 조성하고

생활 속 정원문화를 확산시켜, 시민의 삶이 정원이 되고 그 안에서 행복을 누릴 수 있는 지속가능한 녹색도시 구현

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 일원

○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 1,740백만원(국 53, 도 100, 시 1,587)

○ 사업내용

- (정원교육) 초록정원사 양성, 정원문화특강, 정원관리 전문가 과정 등

- (시민참여 정원관리) 정원친구들(초록정원사+시민), 도시숲ㆍ정원관리인 활용

- (정원문화 확산) 정원문화센터 운영

- (정원산업 활성화) 제4회 전주정원산업박람회 개최

□ 추진상황

○ 초록정원사 양성(기본과정 273명, 역량강화과정 110명)	: '19. ~ '23.

○ 정원문화확산을 위한 정원문화특강(12회, 352명)	: '23. 1. ~ 12.

○ 시민참여 정원 조성 및 관리(160개소)	: '23. 1. ~ 12.

- (재능형기부 봉사)정원친구들(235명) , (일자리 창출)도시숲·정원관리인 등 3개단

○ 정원문화센터 개관 및 운영(아열대식물원, 정원도서관, 정원교육 등)	: '23. 10. ~ 12.

○ 아름다운정원 공모전 통한 우수정원 발굴(3개소)	: '23.  3. ~ 10.

○ 정원드림프로젝트 정원조성·관리(전주권역, 5개)	: '23.  1. ~ 12.

○ 제3회 전주정원산업박람회 개최	: '23.  5. 17.  ~  5. 21.

□ 금후계획

○ 초록정원사 양성(상·하반기), 정원문화특강(22회)        : '24.  1. ~ 12.

○ 도시숲ㆍ정원관리인 등 운영으로 시민참여 정원 지속 관리  : '24.  1. ~ 12.

○ 정원문화센터 운영                               : '24.  1. ~ 12.

- 아열대식물원, 정원도서관, 정원문화특강 등 교육 및 체험프로그램

○ 제4회 전주정원산업박람회 추진	: '24.  1. ~  5.

정원관리팀

전주 지방정원 조성

○ 녹지서비스의 공공적 기능 확대 및 정원산업 활성화의 선도적 역할을

위해 전주시만의 차별화된 지방정원 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 우아동1가 856번지 일원

○ 사업기간 : 2021. ~ 2025.

○ 사업규모 : 103,025㎡

○ 총사업비 : 232억원(국비 10, 도비 30, 시비 192)

- 설계·감리용역 20, 조경(토목)공사 132, 건축공사(가든센터) 40, 토지매입 40

○ 사업내용 : 3개 정원지구 14개 주제정원과 휴식 및 문화공간 조성

□ 추진상황

○ 지방정원 조성 종합계획 용역 추진	: '19. 12. ~ '20. 6.

○ 지방정원 기본 및 실시설계 용역 추진	: '21. 6. ~ '22. 6.

○ 생활문화센터(가든센터) 건축기획 용역	: '22. 2. ~ '22. 6.

○ 생활문화센터(가든센터) 건축설계 공모	: '22. 9. ~ 11.

○ 지방정원 조성사업 공사 착공	: '23. 1. 9.

○ 생활문화센터(가든센터) 건축설계 준공	: '23. 12.

□ 금후계획

○ (조경 및 토목) 지방정원 조성

- 1공구 공사 준공 (자연생태학습원 일원)	: '24. 12.

- 2공구 공사 추진 (양묘장 일원)	: '24. 2. ~ '25. 12.

○ (건축) 가든센터 건립

- 건축 인허가 등 행정절차 이행	: '24. 2. ~ 3.

- 공사 추진	: '24. 4. ~ '25. 12.

정원관리팀

정원식물 지원센터(양묘장) 이전

○ 호동골 일원의 양묘장 및 자연생태체험학습원의 기능을 이전 및

확장하여 꽃 생산과 더불어 정원문화에 대한 교육과 활성화 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 도도동 536-23 외 11필지(항공대대 일원)

○ 사업기간 : 2022. ~ 2024.

○ 사업규모 : 25,676㎡

○ 총사업비 : 6,800백만원 (시비)

○ 사업내용 : 연구관리동 1동, 육묘동(온실) 2동, 야외포지 조성 등

□ 추진상황

○ 건축설계 공모 추진	: '22. 1. ~ 2.

○ 기본 및 실시설계용역 착수	: '22. 2.

○ 스마트 양묘장, 화훼농가 현장조사	: '22. 4. ~ 5.

○ 소규모 환경영향평가 용역	: '22. 5. ~ '23. 4.

○ 공공디자인위원회 자문	: '22. 7. ~ 9.

○ 기본설계 완료보고회	: '22. 10.

○ 실시설계 및 행정절차 이행	: '23. 2. ~ 6.

○ 건축공사 착공	: '23. 10.

□ 금후계획

○ 건축공사 준공	: '24. 10.

○ 온실 자동화 설비공사 추진	: '24. 7. ~ '24. 12.

- 환경제어, 베드, 난방, 스프링클러 등

산림공원과  소 관

□	생활권 산림 휴양인프라 조성	----	25
□	완산칠봉 한빛마루 공원 조성	----	26
□	안전하고 체계적인 산림관리	----	27
□	도심 속 걷기좋은 맨발길 조성	----	28
□	전주 제2차 대표관광지 조성사업	----	29
□	장기미집행 도시공원 사유지 매입	----	30

산림정책팀

생활권 산림 휴양인프라 조성

○ 지역 관광자원과 연계한 도시형 산림치유 인프라 구축으로 지속      가능한 관광자원조성 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 산림 일원(학산, 건지산 일원)

○ 사업기간 : 2023. ~ 2026.

○ 사 업 비 : 18,700백만원(국비 1,980, 도비 5,000, 시비 11,720)

○ 사업내용 : 치유의 숲 2개소, 무장애나눔길 1개소 조성

□ 추진상황

○ 사업대상지 확보	: '23. 1. ~ 12.

- 국유림 사용협의(38ha), 사유지 매입(1.2ha)

○ 건지산 치유공원 타당성평가용역 완료	: '23. 7. ~ 12.

○ 무장애나눔길 공모사업 신청 및 선정	: '23. 7. ~ 10.

□ 추진계획

○ 무장애나눔길 조성

- 실시설계용역 및 행정절차 추진	: '24. 2. ~ 6.

- 사업발주 및 사업추진	: '24. 7. ~ 12.

- ’25년 공모사업 신청	: '24. 7. ~ 10.

○ 치유의 숲 조성

- 건지산 치유공원 기본계획용역	: '24. 2. ~ 6.

- 사업대상지 매입 및 기반시설(도로 등) 조성	: '24. 2. ~ 12.

- 치유의 숲 조성 사업계획 승인	: '24. 7. ~ 12.

산림정책팀

완산칠봉 한빛마루 공원 조성

○ 한옥마을의 관광자원과 연계하여 여가 공간 및 볼거리·체험 거리를

제공할 수 있도록 도심 속 힐링 관광 거점지 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 동완산동 산121-1번지 일원

○ 사업규모 : 6.1ha(국·공유지)

○ 사업기간 : 2021. ~ 2025.(5개년)

○ 총사업비 : 20,600백만원(균특 9,300, 시비 7,800, 지방채 3,500)

○ 사업내용

- 랜드마크지구(전망대, 휴게공간, 초록바위 경관조성, 야간경관)

- 힐링캠프지구(힐링센터, 하늘데크길, 출렁다리, 네트놀이시설, 숲놀이터, 힐링정원)

- 플라워갤러리지구(향기가든, 허브가든), 힐링로드지구(탐방로 정비)

□ 추진상황

○ 사전 절차 추진	: '20. 1. ~ 12.

- 기본계획용역, 지방재정투자 심사, 유관기관(문체부, 도청, 교육청) 협의

○ 용역 추진	: '21. 1. ~ '23. 6.

- 기본·실시설계/환경·재해영향평가/사면안정성검토/VE/문화재지표조사

○ 전문가 및 관련 단체(종교, 환경, 시민) 의견수렴	: '21. 11. ~ '22. 6.

○ 공유재산관리계획 수립 및 부지 매입	: '22. 9. ~ '23. 4.

○ 행정절차 이행	: '23. 1. ~ '23. 11.

- 문화재현상변경/ 디자인심의/ BF인증/ 기술자문/ 도시계획시설/ 공법심의

- 공원조성계획, 각종 인허가(개발행위, 건축허가 등), 일상감사·계약심의 등

○ 사업 발주	: '23. 12. ~

- 공종별(조경, 건축, 전기·통신 등) 총괄 발주

□ 추진계획

○ 공사 추진	: '24. 2.

- 조성공사 연차적 시행(랜드마크, 힐링캠프, 플라워갤러리, 힐링로드)

○ 완산칠봉 한빛마루공원 조성사업 준공	: '25.

산림보호팀

안전하고 체계적인 산림관리

○ 숲의 체계적 관리로 산림자원의 경제적 가치 증진 및 공익적 기능 확대

○ 산불 및 산사태 예방 활동, 병해충 적기방제로 산림생태계의 건강성 유지

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 산림 일원

○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

○ 총사업비 : 1,218백만원(국비 434, 도비 161, 시비 623)

○ 사업내용

- (안전한 산림관리) 산불·산사태 예방활동 및 취약지 관리

- (산림자원 보호·관리) 산림 병해충방제, 조림 및 숲가꾸기, 보호수 관리 등

- (산림 개발·관리) 산지전용 협의, 불법행위 단속 등

□ 추진상황

○ 산불방지 대책본부 운영 : 연 2회(봄·가을 / 2023년 산불발생 2건)

○ 산사태 취약지역 관리 118개소, 사방사업 추진(3개소)

○ 산림병해충 방제사업 : 소나무재선충병 방제(143ha), 이동단속초소(3개소)

○ 조림 및 숲가꾸기 사업 : 조림 1개소(2ha), 숲가꾸기 104개소(150ha)

○ 보호수·노거수 정비사업 : 10개소(외과수술, 안내판 설치 등)

○ 산지전용 협의(148건), 불법 벌채, 불법 산지전용 고발(9건)

□ 추진계획

○ 안전한 산림관리 추진

- 산불대응센터 구축	: '24. 1. ~ 12.

- 산불방지 대책본부 운영(연 2회)	: '24. 2.~5./11.~12.

- 산사태예방 사방사업(3개소) 추진 및 취약지(118개소) 관리 : '24. 1. ~ 12.

○ 산림자원 보호·관리

- 산림병해충 방제사업(130ha)	: '24. 1. ~ 12.

- 조림 및 숲가꾸기 사업(조림 4ha, 숲가꾸기 105ha)    : '24. 2. ~ 10.

- 보호수·노거수 정비사업(안전진단, 외과수술, 전지, 안내판 설치 등) : '24. 2. ~ 6.

○ 산림 개발·관리

- 산지전용 협의, 산림 내 불법행위 단속 추진	: '24. 1. ~ 12.

공원조성팀

도심 속 걷기좋은 맨발길 조성

○ 도심 속 다양한 자연환경(수목, 흙 등)을 활용한 맨발걷기길을 조성하여 시민건강증진을 도모하고 여가생활을 즐길 수 있는 공간 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내 산림 및 공원

○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2028. 12.

○ 사 업 비 : 4,000백만원(특교세 500, 도특 200, 시비 3,300)

○ 사업규모 : 15개소(산림 4개소, 공원 11개소)

○ 사업내용 : 황톳길, 세족장 등 맨발걷기길 조성

- (산림지역) 주요 등산로(학산, 천잠산, 기린봉 등) 중심 조성

- (공원지역) 이용률이 높은 도시공원 대상 조성

□ 추진상황

○ 맨발걷기 활성화 관련 조례 제정	: '23. 3.

○ 선진지 견학(영광, 순천, 남원)	: '23. 11.

○ 시범사업 추진	: '23. 11. ~

- 시범사업 후 모니터링을 통하여 관리·개선·확대·운영방안 모색

○ 맨발걷기길 종합계획 수립 용역 추진	: '23. 12. ~

- 거점별 조성방안, 설치방법, 관리대책 등 종합방안 마련

□ 추진계획

○ 종합계획 마련	: '24. 3.

○ 연차별 사업추진	: '25. 1. ~

공원조성팀

전주 제2차 대표관광지 조성사업

○ 덕진공원을 전주시 대표관광지로 조성하여 관광객 유입을 유도하고 한옥마을과 연계하여 관광객들이 전주에 체류할 수 있는 관광 코스 개발

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 덕진동1가 1316-2번지 일원(덕진공원)

○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.

○ 사 업 비 : 9,640백만원(도비 3,190, 시비 6,450)

○ 사업규모 : 관광기반사업 10개사업

○ 사업내용 : 연화정, 덕진정, 수변쉼터, 전통 담장길, 야간 경관조명, 물맞이소, 취향정 수변정비, 전통놀이마당, 연꽃 군락지, 연지교 재가설

□ 추진상황

○ 2차 대표관광지 조성 기본계획 수립	: '18. 10.  ~ '19. 4.

○ 연화정 재건축 및 덕진정 신축 완료	: '20. 10.  ~ '22. 6.

○ 공사추진(4개 사업)	: '22. 12. ~

- 전통 담장길, 취향정 수변정비, 연꽃 군락지, 연지교 재가설

○ 용역추진(4개 사업)	: '24. 1. ~

- 수변쉼터, 야간경관, 물맞이소, 전통놀이마당

□ 추진계획

○ 공사추진(4개 사업)	: ~ '24. 6.

○ 용역완료(4개사업) 사업추진	: ~ '24. 12.

장기미집행도시공원보상TF팀

장기미집행 도시공원 사유지 매입

○ 장기미집행 도시공원 사유지 매입을 통해 공원 실효를 방지하고 조성계획 변경 등 체계적 공원 관리로 시민의 공공복리 증진

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내 일몰제 대상공원 12개소

○ 사업기간 : 2020. ~ 2025.(6개년)

○ 사 업 비 : 353,004백만원(시비 22,004, 지방채 331,000)

○ 사업내용 : 12개 공원 내 사유지(2.4㎢) 매입

□ 추진상황

○ 장기미집행 도시공원 관리방안 수립	: '19. 9. 10.

○ 실시계획 고시	: '20. 6. 26.

○ 토지보상 추진	: '20. 6. ~ 현재

○ 대책협의회 구성(토지주 포함) 및 운영(10회)	: '20. 12. ~

○ 관리방안 타당성 검토 및 재정비 방안 수립	: '23. 6. 21.

○ 장기미집행 도시공원 실시계획(변경) 용역 추진	: '23. 11. 2. ~

□ 추진계획

○ 지장물 철거계획 수립 및 추진	: '24. 1. ~

○ 토지수용재결(효자묘지공원)	: '24. 9. ~

○ 도시공원 실시계획(변경) 및 지형도면 고시	: '24. 10.