제407회 전주시의회 임시회 도시건설위원회

2024년도

주요업무계획

	도시건설안전국

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주 요 업 무 계 획
	○	도시계획과	-------	8
	○	안전정책과	-------	15
	○	건축과	-------	25
	○	도로과	-------	33
	○	하천관리과	-------	44

일  반  현  황

□ 기   구 : 5과 23팀

																									도시건설안전국
	도시계획과 (6팀)														안전정책과 (5팀)														건축과 (6팀)														도로과 (3팀)														하천관리과 (3팀)
	도시정책														안전총괄														건축행정														도로계획														하천계획
	도시계획														사회재난														건축안전														도로시설														하천시설
	지구단위계획														자연재난														주거복지														도로정비														물순환관리
	도시디자인														중대재해예방														공공주택
	부동산관리														민방위														주택관리
	주소정보																												옥외광고물

□ 정‧현원

과 별		총 계	일 반 직						전문 경력관
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	99	1	5	26	28	23	15	1
	현 원	100	1	5	24	31	24	14	1
도시계획과	정 원	27	1	1	8	7	5	5
	현 원	27	1	1	6	9	8	2
안전정책과	정 원	24		1	6	5	6	5	1
	현 원	24		1	5	6	8	3	1
건축과	정 원	22		1	6	7	5	3
	현 원	22		1	7	6	3	5
도로과	정 원	14		1	3	5	4	1
	현 원	15		1	3	5	4	2
하천관리과	정 원	12		1	3	4	3	1
	현 원	12		1	3	5	1	2

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
도시계획과	○ 전문건설업 등록 관리 ○ 도시기본계획수립 및 관리계획결정, 도시계획사업 시행인가 ○ 지구단위계획구역 및 지구단위계획 결정(변경) 등 ○ 전주시 도시디자인 정책총괄 및 경관계획 수립 등 ○ 개별공시지가 결정·공시 및 지적재조사 등 지적정보 관리 ○ 도로명주소 부여 및 주소정보시설 구축
안전정책과	○ 자연재난(복구계획 등), 사회재난(화재 등) 총괄 ○ 안전관리계획 수립 및 안전문화운동(재난교육) ○ 재난상황실 운영 및 방재시설 유지관리 ○ 사회재난 훈련계획(안전한국훈련 등) 수립 및 운영 ○ 재해위험지구 지정 및 정비사업 추진, 재난관리기금 운용 ○ 중대재해예방 및 산업안전보건관리 총괄 ○ 민방위교육, 시설 및 장비 관리, 을지연습, 화랑훈련 등 ○ 승강기 유지관리, 수상레저업 등록, 어린이놀이시설 안전관리
건 축 과	○ 건축인·허가, 건축심의, 임대사업자 등록 및 관리 ○ 건축물 안전점검, 공공건축 설계공모 운영 ○ 주거복지 기본계획 수립, 저소득층 주거급여 지원 ○ 전주형 사회주택 및 청년 매입임대주택 공급 ○ 청년(신혼부부) 주거안정 지원사업 ○ 주택관리 지원사업, 저소득층 노후주택 개보수 사업 ○ 옥외광고물 관리 및 정비, 간판개선사업
도 로 과	○ 도로건설․관리계획 수립 ○ 국‧공유재산(도로)관리 및 용도폐지 ○ 신규 도로개설 및 용지보상, 도시가로망 확충 ○ 국도․고속도로 지원 및 지방도 도로구역 결정 및 개설 ○ 보행안전 및 편의증진계획 수립 ○ 도로유지관리, 도로안내표지판 및 가로등 관리
하천관리과	○ 하천 종합정비계획 수립 ○ 하천 통합문화공간 등 친수공간 및 편의시설 조성 ○ 국‧공유재산(하천) 용도폐지 및 폐천부지 관리 ○ 생태하천 복원사업 및 지방하천 정비사업 ○ 수질오염 총량 및 비점오염저감시설 관리

기  본  현  황

□ 도시계획 연혁

년 월 일	고시기관	번 호	계획면적 (㎢)	목표 년도	계획인구	주 요 내 용
1938. 5. 9	조선총독부	403	19.76	1948	100,000	도시계획구역 결정
1966. 2.10	건설부	2,188	108.71	1983	550,000	도시계획 재정비
1970. 4.14	″	178	157.22	1986	500,000	도시계획 일부 변경
1973. 6.27	″	258	313.20			개발제한구역 216.4㎢지정
1974. 8.14	″	272	313.20			도시계획 재정비
1976. 3.27	″	37	313.20			도시계획 재정비
1984. 9. 8	″	442-16839	313.20	2001	800,000	도시기본계획 승인
1986. 5. 8	″	206	313.20	1991		도시계획 재정비
1991.12.27	″	30312-36414	313.20	2001	848,000	도시기본계획 변경(1차)
1995. 2. 6	전주시	20	313.20	2001	860,000	도시기본계획 변경(2차)
1995. 6.29	전라북도	112	313.20	2001		도시계획 재정비
2002. 9.25	건설교통부	58450-899	313.18	2021	850,000	도시기본계획 승인
2003. 6.26	건설교통부	161	313.20			개발제한구역 225.4㎢해제
2005. 7.29	전라북도	186	313.18	2010		도시계획 재정비
2007. 5.14	전주시	510	313.18	2021	850,000	도시기본계획 일부 변경
2009. 2.11	전주시	255	313.18	2021	850,000	도시기본계획 일부 변경
2012.10.18	전주시	1151	206.11	2025	780,000	도시기본계획 승인
2015. 8.28	전주시	112	206.28	2020		도시관리계획 재정비
2020. 8.28	전주시	2161	205.49	2035	750,000	도시기본계획 승인
2022. 4. 8	전주시	57	205.49	2030		도시관리계획 재정비

□ 용도지역

구분	합계	도시지역					비도시지역
		소계	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	소계	관리지역	농림지역	자연환경 보전지역
면적 (㎢)	205.49	196.26	37.98	4.82	7.65	145.81	9.23	2.91	6.12	0.20
비율 (%)	100.00	95.52	18.49	2.35	3.72	70.96	4.48	1.41	2.98	0.09

□ 용도지구

지 구 명	개 소 수	면 적(㎡)	비 고
계	299	19,453,957
경 관	93	3,768,721
고 도	24	7,756,554
방 화	23	4,351,884
보 호	2	6,179
취 락	156	3,306,359
특정용도제한	1	263,893

□ 도로명 현황                               (단위 : 개소)

구 분	계	대로	로	길	비고
도로명수	1,219	3	207	1,009

□ 주소정보 시설                             (단위 : 개소)

구분	합계	도로명판	기초번호판	사물주소판	건물번호판	주소정보안내판	국가지점번호판
시설물	80,354	14,595	1,889	609	62,789	59	413

□ 부동산 중개업소 현황                      (단위 : 개소)

구 분	합 계	공인중개사	중개법인	중개인	비 고
전주시	1,723	1,674	27	22
완산구	841	818	15	8
덕진구	882	856	12	14

□ 토지 현황                                (단위 : 필, ㎢, %)

구분	합 계		대			임 야			기 타
	필지수	면적	필지수	면적	비율	필지수	면적	비율	필지수	면적	비율
계	196,093	206.0	77,687	34.0	16.5	10,903	65.9	32.0	107,503	106.1	51.5

□ 재해위험지구 지정현황

지구명	위 치	면적 (ha)	유형	위험 등급	지정고시일	비고
진기들	덕진구 전미동2가 1615-1번지 일원	363.3	침수위험	가	2010. 2. 26.	’20.10.17. 사업완료 ’22.12. 분석평가용역완료
송천1	덕진구 송천동2가 417번지 일원	21.3	침수위험	나	2015. 9. 4.	’17.12.27. 착공 ’21.12. 사업완료
중인	완산구 중인동 206-3번지 일원	30.4	침수위험	나	2015. 9. 4.	’19.12.19 착공 ’24.4. 완공 예정
금상	덕진구 금상동 1280-4번지 일원	41.2	침수위험	나	2015. 9. 4.	’19.12.27. 착공 ’23.7. 완공
원당	완산구 대성동 1030-79번지 일원	7.2	침수위험	나	2015. 9. 4.	’18. 11. 실시설계 착수 (하천관리과 추진)
월평	덕진구 전미동2가 1475번지 일원	74.3	침수위험	가	2021. 3. 4.	’21.8. 실시설계 착수
조촌	덕진구 장동 534-7번지 일원	86.0	침수위험	가	2022. 3. 31.	’23.6. 실시설계 착수
미산	덕진구 전미동1가 817번지 일원	363.2	침수위험	가	2022. 3. 31.	’23.6. 실시설계 착수
객사천	완산구 대성동 1030-79번지 일원	7.5	침수위험	가	2022. 7. 29.	’23.6. 실시설계 착수 (하천관리과 추진)
공덕	덕진구 금상동 582-1번지 일원	14.6	침수위험	가	2023. 3. 30.	’24.3. 실시설계 착수 예정

□ 급경사지 붕괴위험지구 지정현황

지구명	위 치	규모	유형	위험 등급	지정고시일	비고
영창	완산구 서서학동 369-7번지 일원	L=58m H=12m	붕괴위험	C	2021. 3. 16.	’21.11. 복구 완료
대산	완산구 동서학동 271-5번지 일원	L=55m H=20m	붕괴위험	C	2021. 3. 16.	’21.11. 복구 완료
성결	완산구 서서학동 370-38번지 일원	L=132m H=4m	붕괴위험	C	2020. 10. 6.	’23.6. 공사 준공
서서학10	완산구 서서학동 973-18번지 일원	L=50m H=10m	붕괴위험	D	2021. 6. 15.	’24.4. 공사 착수
도토리골	완산구 중화산동1가 산1-4번지 일원	L=302m H=40m	붕괴위험	D	2019. 4. 5.	’21.12. 공사 착수
색장동 (동부대로)	완산구 색장동 254-7번지 일원	L=480m H=50m	붕괴위험	D	2021. 11. 14.	중기계획 반영
아중호수길	덕진구 우아동1가 산334-2번지 일원	L=173m H=30m	붕괴위험	D	2022. 4. 19.	’23.10. 실시설계 착수
견훤로	덕진구 우아동3가 747일원	L=272m H=10m	붕괴위험	D	2024. 1. 15.	중기계획 반영

□ 예·경보시설 현황                           (단위: 개소)

합계	재해문자 전광판	재난감시 CCTV	자동 음성통보	적설계	우량 관측시설	수위 관측시설
109	2	30	53	6	11	7

※ 2023년 대비 증 56(재해문자전광판 +1, 재난감시CCTV +3, 자동음성통보 +45, 적설계 +3, 우량관측시설 +4)

□ 민방위 시설                               (단위: 개소)

합계	대피시설	경보시설	비상급수시설	비 고
308	209	21	78

※ 2023년 대비 감 9(대피시설 -9, 급수시설 -1, 경보시설 +1)

□ 어린이놀이시설                            (단위: 개소)

합계	도시공원	어린이집	주택단지	놀이제공업소	종교시설	기타
958	161	106	639	15	9	28

※ 2023년 대비 감4(도시공원 -1, 어린이집 -4, 주택 +2, 놀이 +2, 기타 –3)

□ 승강기 설치 현황                            (단위: 대)

구분	총계	엘리베이터	에스컬레이터	리프트
합계	11,330	10,946	346	38
완산구	5,829	5,602	210	17
덕진구	5,501	5,344	136	21

※ 2023년 대비 증190(엘레베이터 +183, 에스컬레이터 +6, 리프트 +1)

□ 주택 현황                                       (단위:세대)

구 분	계	단독주택	다세대주택 동당660㎡미만	연립주택 (4층이하)	아파트 (5층이상)	일 반 가구수	주 택 보급율
주택수	328,630	131,865	4,624	4,740	187,401	296,394	110.88%
비율(%)	100%	40.13%	1.41%	1.44%	57.02%

□ 광고업 등록 및 옥외광고물 현황

(단위:개소)

광고업자 등록현황 (명)	옥외광고물 (개)	시 지정 광고시설
		계	게시대	벽보판	육교현수막	비 고
357	36,473	345	304 (1,352면)	39 (468면)	2

□ 도로 현황                                     (단위:개소, ㎞)

구 분	계		고속국도		일반국도		지 방 도		시 도
	노선	연장	노선	연장	노선	연장	노선	연장	노선	연장
총연장	3,936	935	2	13	5	35	3	21	3,926	866
포장도	3,936	935	2	13	5	35	3	21	3,926	866
포장율(%)				100		100		100

※ 도로율 : 8.17%(도시지역 도로면적 16,150,689㎡ / 도시지역면적 197,627,900㎡)

※ 비법정도로 218㎞(567개 노선) 미포함(난전들로, 중인1길 등)

□ 교량 및 기타시설물	(단위 :개)

구분 계	교 량					육교	지하 보도	지하차도	터널	언더 패스	비고
	소계	고속 국도	일반 국도	지방도	시도
184	146	0	22	4	120	9	6	4	2	17

※ 장대교량 (삼례교 : 570m, 회포대교 : 707m)

□ 하천 현황                                         (단위 : ㎞)

구 분		개소	하천연장	제 방 연 장			개수율 (%)	비고
				계	기개수	미개수
계		34	116.7	198.2	123.6	74.6	62.4
법정하천	소 계	33	113.3	191.4	122.2	69.2	63.8
	국가하천	3	25.4	32.4	32.0	0.4	98.8
	지방하천	17	70.9	125.0	87.6	37.4	70.1
	소 하 천	13	17.0	34.0	2.6	31.4	7.6
비법정하천		1	3.4	6.8	1.4	5.4	20.6	노송천

도시계획과  소 관

□	도시관리계획 변경 및 도시계획조례 개정	----	9
□	경관관리 및 경관계획 재정비	----	10
□	공공디자인 활성화	----	11
□	개별공시지가 결정․공시	----	12
□	지적재조사 사업 추진	----	13
□	도로명주소 부여 및 주소정보시설 구축	----	14

도시계획팀

도시관리계획 변경 및 도시계획조례 개정

주민과 기업의 생산활동에 불편을 초래하고 도시의 성장을 저해하는 불합리한 사항을 해소하고 시 현안 사업과 관련된 도시관리계획 결정

□ 사업개요

○ 공간범위 : 전주시 행정구역 전역 205.49㎢

○ 추진기간 : 2022. 9. ∼ 2024. 12.

○ 사 업 비 : 700백만원(시비 / '22년 100백만원, '23년 400백만원, '24년 200백만원)

○ 주요내용 : 역사도심 등 지구단위계획 정비, 지구단위계획 지침 및 녹지지역 개발행위 기준 수립, 도시계획 조례 개정(용적률, 개발행위) 등

□ 추진상황

○ 도시관리계획 변경 용역 착수	: '22. 11. 29.

○ 도시계획 조례 개정	: '22. 11. ∼

- (1차) 높이 40m 이상 건축물 도시계획위원회 심의 폐지 등('22. 11. 4. 고시)

- (2차) 주거‧상업지역 용적률 완화, 지구단위계획수립지침 제정 등('23. 12. 20. 고시)

- (3차) 녹지지역 층수 완화 등('24. 1. 30. 입법예고)

○ 역사도심지구단위계획 변경	: '22. 12. ∼

- (1차) 프랜차이즈 등 업종 및 건축물 용도 제한 완화('23. 2. 6. 고시)

- (2차) 개발규모‧옥외광고물 등 규제 완화('23. 4. 28. 고시)

□ 추진계획

○ 녹지지역 층수 완화 등 조례 개정 및 운영지침 제정	: '24. 4.

○ 팔복동 공업지역(태평지구) 지구단위계획 변경	: '24. 5.

○ 공원주변 고도지구 변경	: '24. 10.

도시디자인팀

경관관리 및 경관계획 재정비

경관법에 따라 경관계획을 재정비하고 사회기반기설 및 건축물 등에 대한 경관심의·자문·협의를 통해 품격있는 도시 경관 형성을 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2024. 1. ∼ 12.

○ 사업근거 : 경관법 및 전주시 경관 조례

○ 사업내용 : 경관계획 재정비 및 경관위원회 운영

- (경관계획) 변화된 도시 여건에 따라 경관 관리계획 및 관리방안 수립

․ 경관축(역사문화, 자연, 도심), 조망축, 스카이라인, 야간경관 등

(경관위원회) 사회기반시설(공원, 조경, 도로, 하천 등) 및 건축물(민간, 공공) 경관심의‧자문‧협의

□ 추진상황

○ 전주시 경관계획(재정비) 수립 용역

- 경관계획 우수사례 조사(인천광역시, 시흥시)	: ’23. 1. 10.

- 경관계획 재정비 용역 입찰공고(협상에 의한 계약)	: ’23. 4. 21.

- 경관계획 용역 제안서 평가위원회 개최	: ’23. 5. 25.

- 경관계획(재정비) 수립 용역 착수	: ’23. 6. 23.

- 전주시 및 타지역 경관사례조사 및 분석	: ’23. 6.∼

○ 전주시 경관위원회 운영

- 경관위원회 심의 운영(10회, 심의 17건)	: ’23. 1.∼12.

- 전주시 제8대 경관위원회 구성(임기 2년)	: ’23. 4. 28.

○ 경관관련(심의, 도시관리계획, 건축허가 등) 협의(110건)	: ’23. 1.∼12.

□ 추진계획

○ 경관계획(재정비) 수립 용역 추진	: ∼ ’24. 6.

○ 전주시 경관위원회 운영(월 1회)	: ’24. 1.∼12.

도시디자인팀

공공디자인 활성화

공공건축물 및 공공공간에 대한 디자인 심의·자문 및 각종 공공시설물 디자인 협의를 통하여 도시디자인 통일성을 확보

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2024. 1. ∼12.

○ 사업근거 :「공공디자인 진흥에 관한 법률」 및 「전주시 공공디자인 진흥에 관한 조례」

○ 사업내용 : 심의‧자문(공공디자인위원회), 협의(담당부서), 도시디자인아카데미 운영

(위원회 심의) 공공건축물(신축, 리모델링), 공공공간 조성, 도로 및 도로부속시설물

(위원회 자문) 현상설계공모 건, 심의 후 추가변경이나 보완 사항

(부서협의) 도시디자인 기본계획 및 도시디자인 가이드라인 등에 따른 각종 공공시설물 디자인(가로등, 보도블록패턴, 안내판, 소규모건축물 등)

(아카데미) 공공디자인 선진지 견학

□ 추진상황

○ 공공디자인위원회 운영(9회, 20건)	: ’23. 1.∼12.

○ 공공디자인 부서 협의(147건)	: ’23. 1.∼12.

○ 도시디자인 아카데미 운영(3회)	: ’23. 1.∼12.

○ 제4대 전주시 공공디자인위원회 위원(28명) 위촉	: ’24. 1. 8.

□ 추진계획

○ 전주시 공공디자인위원회 운영(월 1회)	: ’24. 1.∼12.

○ 공공디자인 부서 협의 추진(상시)	: ’24. 1.∼12.

○ 도시디자인 아카데미 추진(연 2회)	: ’24. 5월/10월

부동산관리팀

개별공시지가 결정·공시

개별 필지에 대한 정확한 토지특성 조사와 지가산정, 감정평가사 검증 및 이의신청 접수․처리 등으로 개별공시지가의 객관성 및 공정성 확보

□ 사업개요

○ 근거법률 : 「부동산 가격공시에 관한 법률」

○ 대상필지 : 146,268필지(전체필지의 74.6%)

○ 사업예산 : 136백만원(국비 68.3, 시비 68.3)

○ 사업내용 :

- 정확한 토지특성조사 및 지가산정 후 감정평가법인등의 철저한 검증 실시

- 의견제출 및 이의신청 기간 토지소유자등에게 「감정평가사 상담제」및「현장설명제」운영으로 신뢰성 있는 개별공시지가 결정·공시

○ 개별공시지가 결정·공시(전주시장)  : 연 2회

- 정기분(1. 1. 기준) 개별공시지가 ⇒  4. 30. 결정·공시

- 수시분(7. 1. 기준)* 개별공시지가 ⇒ 10. 31. 결정·공시

* 1. 1 .∼ 6. 30.까지 분할․합병 등 토지이동 사유가 발생한 토지

□ 추진상황

○ (정기분) 개별공시지가 토지특성조사 실시	: ’23. 11. 22. ∼ ’24. 1. 18.

○ (정기분) 토지·주택 간 토지특성 균형 협의	: ’24. 1. 23.

○ (정기분) 개별공시지가 지가산정 실시	: ’24.  1. 25. ∼  2. 16.

□ 추진계획

○ (정기분) 개별공시지가 산정지가검증 및 의견제출	: ’24.  2. 19. ∼  4.  8.

○ (정기분) 부동산가격공시 위원회 심의 및 결정·공시	: ’24.  4. 18. ∼  4. 30.

○ (수시분) 개별공시지가 토지특성조사 및 지가산정·검증	: ’24.  6. 26. ∼  8. 30.

○ (수시분) 부동산가격공시위원회 심의 및 결정·공시	: ’24. 10. 15. ∼ 10. 31.

부동산관리팀

지적재조사 사업 추진

토지의 현실경계와 지적공부상 경계가 일치하지 않는 지적공부를 현실경계에 맞게 측량하여 시민의 재산권 행사 불편 해소

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2013. ∼ 2030.(18개년)

○ 사업예산 : 8,200백만원('24년 국비 490백만원)

○ 사업대상 : 총 140개 지구(66,077필지, 23.7㎢)

- 완료 27개(19%), 진행 24개(17%), 예정 89개(64%)

○ 사업내용 : 현실경계로 지적재조사 측량 후 경계 설정

□ 추진상황

구 분	지적재조사지구		필지수	면적(㎡)	비 고
계	24개 지구		11,362	4,722천
2020년 (6개지구)	완산	서완산1, 서완산2, 서완산3	1,227	164천	의견제출 검토 및 조정
	덕진	호성에코1, 호성에코2, 호성에코3	1,247	722천	이의신청 검토 및 조정
2022년 (6개지구)	완산	중노송2, 색장1, 색장2	1,504	784천	의견제출 검토 및 조정
	덕진	인후1, 금암1, 송천2	2,363	424천	이의신청 검토 및 조정
2023년 (7개지구)	완산	동완산2, 동서학1, 대성1	1,129	370천	지적재조사 측량 완료 및 지적확정 예정조서 통지
	덕진	금암2, 팔복1, 팔복2, 호성에코4	2,030	1,494천
2024년 (5개지구)	완산	평화동1가1	594	147천	지구지정을 위한 동의서 확보
	덕진	덕진2, 우아1, 호성에코5, 용정2	1,268	617천

□ 추진계획

○ ’20년·’22년 사업지구 경계결정통지 및 이의신청, 경계확정 및 조정금 통지	: ’24. 1. ∼ 6.

○ ’23년 사업지구(의견제출 검토 및 조정/경계결정통지 및  이의신청)	: ’24. 1. ∼ 6.

○ ’24년 사업지구(지구지정 및 지적재조사측량)	: ’24. 4.

주소정보팀

도로명주소 부여 및 주소정보시설 구축

주소정보 인프라 구축을 통해 시민의 생활안전과 위치 찾기 편의 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2024. 1. ∼ 12.

○ 사업예산 : 357백만원(도비 29, 시비 328)

○ 시설현황 : 6종 80,354개

(’24. 1월 기준)

계	도로명판	기초번호판	사물주소판	건물번호판	주소정보안내판	국가지점번호판
80,354	14,595	1,889	609	62,789	59	413

○ 주요내용

- (주소정보 부여) 신축 등 건물번호, 다가구주택 등 상세주소, 공원 등 사물주소

- (안내시설 구축) 주요 교차로 도로명판 확충, 노후 건물번호판 정비 등

□ 추진상황

○ 2024년 주소정보 업무위탁 협약체결(2건)

구분	수탁자	협약내용	체결금액	체결일
시스템	한국지역정보개발원	기능 고도화 및 기술 지원 등	58,677천원	’23. 11. 21.
기본도	한국국토정보공사	도로·건물 등 객체정보 현행화 등	81,583천원	’24. 1. 3.

○ 2024년 주소정보시설 일제조사 및 정비 계획 수립   : ’24. 1. 30.

□ 추진계획

○ 주소정보시설 일제조사 및 정비 추진	: ’24. 1. ∼ 12.

○ 보행 및 운행 편의 도로명판 확충(350개)	: ’24. 2. ∼  6.

○ 산속 이용자의 안전사고 대비 국가지점번호판 확충(20개)	: ’24. 2. ∼  6.

○ 다가구주택 거주자 편의를 위한 상세주소(동·층·호) 부여(500건)	: ’24. 2. ∼ 12.

○ 다중 이용장소의 위치정보 편의 사물주소 부여 추진(895건)	: ’24. 2. ∼ 12.

안전정책과 소관

□	안전문화 활성화 및 재난․생활안전사고 예방	----	16
□	급경사지 붕괴위험지구 정비사업	----	17
□	사회재난 예방 및 대응 추진	----	18
□	통합재난상황실 구축 사업	----	19
□	재해위험지구 정비사업	----	20
□	학소지구 우수저류시설 설치사업	----	21
□	전주시 중대재해예방 추진	----	22
□	민방위업무 추진	----	23
□	디지털 기반 승강기 스마트관제 플랫폼 사업	----	24

안전총괄팀/사회재난팀

안전문화 활성화 및 재난․생활안전사고 예방

시민들의 안전의식 제고, 각종 안전사고에 대한 예방 활동과 보험 가입, 긴급상황에 대한 대응능력 향상을 통해 시민의 생명과 재산을 보호

□ 사업개요

○ 시민생활 안전분야 안전신문고 운영

○ 시민안전(생활 및 재난)보험 가입 및 운영

○ 안전교육·안전훈련·안전문화 캠페인 실시

○ 민간 다중이용시설 재난 대응훈련 점검 지도

□ 추진상황

○ 전주시 안전관리계획 수립 및 재난관리실태 공고(매년 3월 / 1회)

○ 시민안전보험 확대 계약 체결(9종→20종)	: ’24. 1.

○ 찾아가는 안전교육 수요조사 실시(안전취약계층)	: ’24. 2.

○ 생활안전분야 안전신문고 운영(’23년 107,819건)

□ 추진계획

○  지역안전지수 개선계획 수립(어린이보호구역 개선사업 등 24개사업)  : ’24. 4.

○ 찾아가는 안전교육(취약계층) 실시(노인, 어린이 등)         : ’24. 3.∼12.

○ 폭염대비 시설물(그늘막, 공원 무더위 쉼터 등) 사전점검 및 예방(살수)   : ’24. 6.∼ 9.

○ 재난대응 종합 안전한국훈련 실시                    : ’24. 10.(예정)

○ 민간다중이용시설(5000㎡이상, 37개소) 자체 재난 대응훈련 점검(연1회)  : 연   중

○ 안전점검의 날 안전문화 캠페인 실시                : 연   중

○ 시민안전보험 홍보·풍수해보험·재난배상책임보험 가입 독려  : 연   중

안전총괄팀

급경사지 붕괴위험지구 정비사업

붕괴 또는 낙석 등으로 시민의 생명과 재산피해가 우려되는 급경사지와 그 주변을 정비하여 안전한 생활환경 조성 및 물적 재산피해 예방

□ 사업개요

지 구 명 (지정일/등급)	위 치	사업규모	사업비(백만원)			사업 기간
			총사업비	’22년도	’23년도
성결지구 (’20.10./D등급)	완산구 서서학동 370-38번지 일원	사면정비 (A=528㎡)	500	50	450	’22~’23
서서학10지구 (’21.06./D등급)	완산구 서서학동 973-18번지 일원	사면정비 (A=500㎡)	2,000	120	1,880	’22~’24

□ 추진상황

(성결지구)

○ 붕괴위험지구 지정 및 관리                        : ’20. 10.

○ 실시설계용역 실시                                : ’22. 3. ∼ 12.

○ 행정절차 이행 및 공사착공                        : ’23. 5.

○ 공사완료                                         : ’23. 6.

(서서학10지구)

○ 붕괴위험지구 지정 및 관리                        : ’21. 6.

○ 실시설계용역 착수                                : ’22. 9.

○ 토지 및 지장물 보상 진행                         : ’23. 5. ∼

□ 추진계획

(성결지구)

○ 붕괴위험지구 지정 해제                           : ’24. 3.

(서서학10지구)

○ 행정절차 이행 및 공사 착공                       : ’24. 4.

○ 공사완료                                         : ’24. 12.

사회재난팀

사회재난 예방 및 대응 추진

화재, 붕괴, 폭발, 감염병, 화생방 및 환경오염사고 등 각종 사회재난을 예방하고 상황 발생 시 신속한 대응을 통해 시민의 생명과 재산을 보호

□ 사업개요

○ 재난상황실 운영 : 신속한 상황관리 및 비상단계별 근무체계 구축

○ 재난·재해대비 재난취약분야 상시점검으로 재난발생 최소화

○ 재난 유형별  행동매뉴얼 정비로 재난발생 시 신속대응

○ 재난대비 훈련 대응(다중이용시설 재난 및 안전한국 훈련 등) 및 역량 강화

□ 추진상황

○ 설 명절 대비 재난취약시설(전통시장, 터미널 등 5개소) 안전점검 시행       : ’24. 1.

○ 안전 취약계층 안전장비(소화기, 감지기, 가스경보기) 지원 계획 수립    : ’24. 1.

○ 재난유형별(대형화재,산불,지진 등 30개 유형)대응 매뉴얼 정비   : ’24. 1.

○ 디지털 기반 시설물(교량,건축물,옹벽 등 65개소) 안전관리 시스템 구축 사업 착수    : ’24. 1.

□ 추진계획

○ 안전 취약계층 안전장비(소화기, 감지기, 가스경보기) 지원(1,900세대)	: ’24. 4.∼10.

○ 해빙기 대비 재난취약시설(건축물,교량,옹벽,급경사지 등 200개소) 안전점검	: ’24. 3.

○ 신학기 학교 주변 위해요인(교통·유해·식품·광고물) 안전점검 추진	: ’24. 3.

○ ’24년 안전대전환 집중안전점검(대형건축물·교량 등 110개소) 추진	: ’24. 4.∼10.

○ 여름철 재난취약시설(관광숙박시설 등 29개소) 안전점검	: ’24. 7.∼ 8.

○ 디지털 기반 시설물(교량,건축물,옹벽 등 65개소) 안전관리 시스템 구축사업 준공	: ’24. 8.

○ 추석 명절 대비 재난취약시설(전통시장, 터미널 등 5개소) 안전점검 시행	: ’24. 9.

○ 화재피해주택 피해지원금 지급(단독주택 85㎡이하)	: 연     중

자연재난팀

통합 재난상황실 구축 사업

부서별 분산되어 관리되고 있는 재난안전데이터를 수집·연계하고 배수펌프장 등 방재시설 운영을 통합하여 각종 재난에 신속한 대응체계 마련

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. 12. ∼ 2024. 8.

○ 사업내용 : 디지털 기반 안전도시 구축을 위한 재난상황실 고도화 및 재난안전 플랫폼 구축

○ 사업예산 : 4,000백만원(특교 1,400, 시 1,800, 도기금 400, 시기금 400)

○ 법적근거 : 재난 및 안전관리 기본법제18조의4(재난안전상황실)

□ 추진상황

○ 기본계획 수립 용역	: ’22. 12.∼ ’23. 6.

○ 보안성검토(道)	: ’23.  4.

○ 일상감사 및 계약심사(市)	: ’23.  6.

○ 계약심의(市)	: ’23.  9.

○ 소프트웨어 과업심의(市)	: ’23.  9.

○ 정보화사업 사전협의(道)	: ’23.  9.

○ 협상 대상자 선정 및 계약체결	: ’23. 10.∼ ’23. 12.

○ 통합 재난상황실 구축사업 착수	: ’23. 12. 20.

□ 추진계획

○ 통합 재난상황실 구축	: ’24.  5.

○ 시스템 시험운영 및 안정화                     : ’23. 5.∼ ’24. 8.

○ 통합 재난상황실 구축사업 준공	: ’24.  8.

자연재난팀

재해위험지구 정비사업

집중호우 시 하천 범람 및 내수배제 불량으로 침수피해 우려가 높은 재해위험지구에 대해 정비사업을 시행하여 시민의 생명과 재산을 보호

□ 사업개요

구 분		지 구 명 (유형/등급)	위 치	사업규모	사업비 (백만원)	사업 기간
5개소					165,626
1	자연재해 위험개선	중인지구 (침수위험/나)	완산구 중인동 207-3번지 일원	제방정비 2.9km 등	14,486	’18~’24
2	자연재해 위험개선	월평지구 (침수위험/나)	덕진구 전미동2가 1475번지 일원	유수지 및 펌프장 1개소 고지배수로 신설(L=2.29km)	46,140	’21~’27
3	자연재해 위험개선	미산지구 (침수위험/가)	덕진구 전미동1가 817번지 일원	유수지 1개소, 배수로 정비 2.9km 등	36,000	’23~’27
4	풍수해 생활권	조촌지구 (침수위험/가)	덕진구 장동 534-7번지 일원	유수지 1개소, 배수로 정비 1.54km 등	44,000	’23~’27
5	자연재해 위험개선	공덕지구 (침수위험/가)	덕진구 금상동 582-1번지 일원	제방정비 2.1km, 펌프장 1개소 등	25,000	’24~’28

□ 추진상황

지 구 명		지정일	사업기간	설계추진	보상추진	공사추진
1	중인지구	’15.9.4.	’18~’24	’18.5~’22.10(완료)	’20.10~’23.11(완료)	’19.12~’24.4(90%)
2	월평지구	’17.7.28.	’21~’27	’21.8~’24.11(추진중)	’24.2~(추진예정)	’24.10~(추진예정)
3	미산지구	’22.3.31.	’23~’27	’23.6~(추진중)	’24.11~(추진예정)	’25.6~(추진예정)
4	조촌지구	’22.3.31.	’23~’27	’23.6~(추진중)	’24.11~(추진예정)	’25.6~(추진예정)
5	공덕지구	’23.3.30.	’24~’28	’24.3~(추진예정)	’25.6~(추진예정)	’26.6~(추진예정)

□ 추진계획

○ ’24년 신규사업 대상지구(공덕) 기본 및 실시설계용역 발주        : ’24. 3.

- 일상감사 및 원가심사, 계약심의(’24. 1.)

○ 중인지구 공사 완료                                  : ’24. 4.

○ 월평지구 공사 행정절차 이행 및 사업 추진            : ’24. 10.

- 보상 추진(’24. 2.), 기술자문위원회, 원가심사 등

○ 월평지구 기본 및 실시설계용역 준공                  : ’24. 11.

중대재해예방팀

학소지구 우수저류시설 설치사업

지대가 낮아 집중 호우시 침수피해가 발생하고 있는 지역에 우수 저류시설 설치 등을 통하여 홍수로부터 시민의 생명과 재산을 보호

□ 사업개요

○ 사업기간  : 2022. ∼ 2025.(4개년)

○ 위    치 :  완산구 평화동2가 21-3번지 일원(맏내공원 일원)

○ 사업규모 : 저류시설 2개소, 관로 정비 0.57km

○ 총사업비 : 16,800백만원(국 8,400, 도 2,520, 시 5,880)

- ’23년도까지 : 7,000백만원(국 3,500 , 도 1,050, 시 2,450)

- ’24년 이후 : 9,800백만원(국 4,900,  도 1,470,  시 3,430)

	< 기 완료지구 현황 >
▪ 사업기간 : ’15. ~ ’21.(7개년) ▪ 지 구 명 : 전주초지구, 매화지구, 송천Ⅰ지구 ▪ 사업규모 : 유수지 3개소(38,500㎥), 펌프장 3개소, 관로 정비 1.88km ▪ 총사업비 : 54,938백만원(국 26,719, 도 8,015, 시 20,204) ①전주초 12,450백만원 ②매화 17,100백만원 ③송천Ⅰ 25,388백만원

□ 추진상황

○ ’22년 우수저류시설 설치사업 선정                       : ’21. 4.

○ 설계용역 행정절차 이행(일상감사 및 원가심사)              : ’22. 1.∼2.

○ 기본 및 실시설계용역 착수                             : ’22. 4.

○ 우수저류시설 설치사업 보상 추진                       : ’23. 6.

○ 사전설계검토 회의(행안부)                              : ’23. 9.

□ 추진계획

○ 전주시 기술자문위원회                                 :  ’24. 3.

○ 일상감사, 원가심사 등 행정절차                        :  ’24. 4.

○ 우수저류시설 설치사업 공사 추진                       :  ’24. 6.

중대재해예방팀

전주시 중대재해예방 추진

작업환경, 작업방식 등으로 인한 종사자의 산업재해 및 원료, 제조물, 공중이용시설, 공중교통수단의 결함으로 인한 중대재해 발생 예방

□ 개요 및 관리대상

○ 중대재해 : 중대산업재해 + 중대시민재해

- (중대산업재해) 작업환경, 작업방식 등으로 발생한 종사자 산업재해

- (중대시민재해) 원료, 제조물, 공중이용시설, 공중교통수단의 결함으로 발생한 이용자 재해

〈중대재해예방 관리대상 (’24. 1월 기준)〉

▸(중대산업재해) 3,384명(공무원 2,322, 공무직 409, 환경관리원 202, 청원경찰 58, 기간제 등 393) + α(수급자 종사자 등)

▸(중대시민재해) 157개소(직접운영 115, 위탁운영 전주시립요양병원 등 42)

구 분		분 야	개소	세부 시설	소관부서
합 계			115
공중 이용 시설	실내공기질법	업무시설	7	전주시청사·의회청사 등	회계과 등 5개 부서
		복합용도건축물	12	도서관(11개소), 덕진예술회관	도서관운영과,예술단운영사업소
	시설물안전법	건축물	1	농수산물도매시장	농축산정책과
		옹벽·절토사면·하천	6	혁신 생태통로 옹벽, 색장동 급경사지 등	양구청 건설과 덕진구 공원녹지과
		교량·터널	89	마전교, 진북터널 등

□ 추진상황

○ 중대재해예방팀(팀장, 안전․보건관리자 배치) 신설       : ’22. 10.

○ 중대산업재해, 중대시민재해 대응 매뉴얼 수립       : ’22. 12.

□ 추진계획

○ 2024 전주시 중대재해예방 기본계획 수립          : ’24. 2.

○ 중대재해대응 관리감독자(부서장) 집체 교육         : ’24. 3.

○ 중대재해예방 현장 기획점검 및 컨설팅(연중)        : ’24. 3.∼12.

○ 현업업무 종사자 안전보건 교육추진(분기별)           : ’24. 3.∼12.

○ 현업업무 종사자 의견청취 및 개선조치(분기별)       : ’24. 3.∼12.

○ 안전보건 확보 의무사항 이행여부 점검조치        : ’24. 5. / 11.

민방위팀

민방위업무 추진

전시 또는 재난 등 유사시, 시민의 생명과 재산 보호를 위해 민방위
계획수립‧실시 및 각종 대응 연습을 통해 대비태세 만전

□ 사업개요

○ 전시 대비 충무계획 수립 : 총괄 및 인력동원 실시계획 등

(14개 분야) ①행정안전, ②통일, ③보건복지, ④문화체육관광, ⑤여성가족, ⑥산업통상자원, ⑦농림축산식품, ⑧교통, ⑨환경, ⑩건설, ⑪방송, ⑫상수도, ⑬자체충무계획 ⑭개인정보보호

○ 국가 비상대비태세 확립을 위한 을지연습 추진(연1회–8월중 예정)

○ 지역 통합방위태세 확립을 위한 통합방위협의회 개최(분기별)

○ 민방위 편성(만20∼40세 남자) : 36,906명(1∼4년차 17,202, 5년차 이상 19,704)

○ 민방위 교육훈련 통지·출결 운영 ※ (1∼2년차) 집합 / (3년차 이상) 사이버

○ 민방위 시설(308개소) 및 장비(40,036개) 유지관리

- (시  설) 대피 209개소, 경보 21개소, 급수 78개소

- (장  비) 민방위 6종 장비 2,077개, 화생방 6종 37,959개

□ 추진상황

○ 분야별 충무실시계획(14개분야 23개계획) 수립‧배부	: ’23. 11.∼12.

○ ’24년도 민방위 실시계획 수립‧배부	: ’23. 11.∼12.

○ ’24년도 (지역/직장)민방위대 편성	: ’24. 1.

□ 추진계획

○ 민방위 시설·장비 점검(분기별)	: ’24. 1.∼12.

○ 비상급수시설 확충 및 노후 경보시설 교체 추진	: ’24. 1.∼11.

○ 전시종합상황실 환경개선공사 추진	: ’24. 2.∼10.

○ 충무계획 보완 및 중점관리자원 확인(연3회)	: ’24. 2.∼12.

○ 전주시 통합방위협의회 개최(분기별)	: ’24. 3.∼11.

○ 민방위 집합교육 및 사이버교육 실시	: ’24. 4.∼11.

○ ’24년도 을지연습 실시	: ’24. 8.

민방위팀

디지털 기반 승강기 스마트관제 플랫폼 사업

4차 산업혁명기술(AI, IoT 등)을 적용, 각종 승강기 안전사고를 미연에 방지하고 위급상황 등 유사 시 신속․정확하게 대응, 안전도시 전주 위상 강화

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’23. 10. ∼ ’26. 6.

○ 위    치 : 전주시 산하 도서관 승강기 10개소

※ 호남권 최초 도입 시범사업으로, 많은 시민들이 자주 찾는 도서관을 우선 선정

○ 주요내용 : 승강기내 AI, IoT기술 탑재 원격감지시스템 설치 및 플랫폼 운영

○ 시행기관 : 한국승강기안전공단

○ 소요예산 : 비예산 ※ ’26. 6. 이후 유지관리비 월 300천원 소요

【참고】디지털 기반 승강기 스마트관제 플랫폼이란?

▸행정안전부 산하기관 한국승강기안전공단 시범사업으로, 승강기 관련 각종 위험상황 대응 및 사고예방을 위해 감시․신고․초기대응․상황전파에서 긴급구조․사후관리까지 全단계에 적용되는 국민 안전을 위한 승강기 안전망

▸플랫폼 도입 전·후 사고 대응방식 변화

(신고방식) 유선→온라인 / (상황전파) 일대일(1:1)→일대다(1:N) / (상황공유) 특정인→이해관계자 전체

□ 추진상황

○ 사업참여 제안(한국승강기안전공단→전주시)	: ’23. 7.

○ 사업 검토 및 실무협의	: ’23. 8.

○ 승강기 스마트관제 플랫폼 시범사업 업무협약 체결	: ’23. 10.

- (협약기간) 2023. 10. 23. ∼2026. 6. 30.

- (협약내용)

(공단)설치비, 통신비 등을 포함한 안전장치 및 관련 시스템 일체 무상 제공

(전주시)제공된 플랫폼-웹서비스 활용 승강기 안전관리 업무수행

□ 추진계획

○ 승강기 통합관제시스템 설치(10개소)	: ’24. 1.∼6.

○ 스마트관제 플랫폼 시범운영 및 본격 가동	: ’24. 7.

건 축 과  소 관

□	건축위원회 확대 운영	----	26
□	건축물 재난예방을 위한 안전점검 강화	----	27
□	맞춤형 주거복지 서비스 활성화	----	28
□	청년 매입임대주택 공급	----	29
□	청년(신혼부부) 주거안정 지원	----	30
□	주택관리 지원사업 추진	----	31
□	불법광고물 없는 깨끗한 거리 조성	----	32

건축행정팀

건축위원회 확대 운영

건축 허가 전 건축구조, 계획, 안전 및 해체 등에 대한 사전심의로 건축물의 안전·기능·환경·미관 향상을 통해 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2024. 1. ∼ 12.

○ 사업근거 : 건축법 제4조 및 건축 조례 제6조

○ 구성인원 : 각 분야 교수 및 전문가 53인

○ 심의대상

- 다중이용건축물 및 특수구조 건축물의 구조안전에 관한 사항

- 100세대 이상의 공동주택 및 연면적 5천㎡이상의 분양 건축물

- 건축법 제46조제2항에 따른 건축선의 지정에 관한 사항

- 건축물 관리법 제30조에 따른 건축물 해체에 관한 사항 등

□ 추진상황

○ 제22대 건축위원회 위촉 및 구성	: ’22. 6.

○ 2023년 건축위원회 운영 현황

구 분	총 계	본심의	소위원회	구조1분과	구조2분과*
개최횟수	38회	11회	11회	8회	8회
안 건 수	115건	29건	34건	15건	37건

* 건축물 해체심의 의무 대상 확대(’22.8.4.시행)로 23년 5월부터 해체전문 위원회를 별도 구성 운영 중

* ’22년 대비 개최횟수 26%증가, 24년에도 지속적으로 증가할 것으로 예상됨

□ 추진계획

○ 건축위원회 심의 확대 운영                     : ’24. 1. ∼ 12.

- 안전․환경분야 등 전문위원회 확대 구성으로 전문성 증대

- 심의위원회 정례화 및 수시개최로 신속한 사업추진 적극 지원

○ 제23대 건축위원회 위촉 및 구성	: ’24. 6.

건축안전팀

건축물 재난 예방을 위한 안전점검 강화

노후건축물 및 시공중인 건축물의 재난예방을 위하여 건축물의 관리 및 상태 등에 대한 내실있는 안전점검으로 건축물의 안전 확보 도모

□ 사업개요

○ 사업대상 : 안전점검이 필요한 노후건축물 및 시공중인 건축물

○ 사업기간 : 2024. 1. ∼ 12.

○ 사 업 비 : 22.5백만원(국비 21.5 시비 1) ※이월예산 국 20백만원 포함

○ 사업내용 : 전문가(건축사·건축구조기술사 등) 합동 안전점검 실시

- 주요구조부 균열⋅파손⋅침하 등 안전점검이 필요한 노후건축물

- 시공중인 건축공사장에 대한 전반적인 안전점검 및 감리 감독 등

□ 추진상황

○ 지역건축안전센터 전문인력(건축사 1, 건축구조⋅시공기술사 1) 채용 추진	: ’21. 6. ∼

- 전문인력 미채용 : 저임금으로 신청자 없음(’23년도 5회 모집공고)

○ 대형(해체) 건축물⋅노후건축물 안전점검 및 관리⋅감독	: ’23. 1. ∼ 12.

- 대형 건축공사장 및 해체공사장 안전점검 및 관리⋅감독(38건)

- 노후건축물, 자연재난 취약건축물, 안전등급 D등급 이하 건축물 안전점검(19건)

○ 화재안전 성능보강 지원사업 추진(총38개소/ 23년도 5개소 완료)	: ’20. 5. ∼

□ 추진계획

○ 기존건축물 안전점검 강화 추진(구청·동 점검대상 수시 접수)	: ’24. 1. ∼

- 노후건축물, 자연재난 취약건축물 등 분기별 전문가 합동점검 실시

○ 대형(해체) 건축공사 현장 안전점검 및 관리⋅감독 추진	: ’24. 1. ∼

- 해빙기 및 우기· 동절기 등 시기별  안전점검 실시

- 해체 공사 현장에 대한 안전점검 실시

주거복지팀

맞춤형 주거복지 서비스 활성화

민·관협력 주거복지 전달체계 활용 및 연계로 시민의 주거안정과 복지 사각지대 해소를 통해 누구나 행복한 주거복지 통합서비스 추진

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2024. 1. ∼ 12.

○ 사 업 비 : 365백만원(시비)

○ 사업내용

- 민간·공공 주거복지 전달체계 가동으로 자원연계·주거서비스 제공

- 정책발굴, 홍보 확대, 긴급 지원 등을 위한 주거복지 네트워크 운영

□ 추진상황

○ 전주시 주거복지센터 운영	: ’23. 1. ∼ 12.

- 종합상담·정보제공(1,028건), 주택임대차 무료 법률상담(12회/39명)

- 순환형 임대주택 15호 운영(36가구/47명), 연탄보일러 교체 비희망 가구조사(60가구)

- 집수리학교 시범운영 및 봉사활동 추진(교육 4회, 봉사 2회, 120명)

○ 전주시 주거복지협의체 운영(전주시, LH전북 등 단체참여)	: ’23. 1. ∼ 12.

- 주거복지 정책 홍보, 수요 맞춤 공공임대주택 공급 협력 등

○ 청년주거 정책 집담회 및 공동체주택 원탁토론회 실시	: ’23. 4. ∼ 12.

○ 전세사기 피해자 긴급지원주택 운영(입주 2가구)	: ’23. 6. ∼ 12.

□ 추진계획

○ 주거복지센터 활성화 및 주거복지협의체 지속 운영	: ’24. 1. ∼ 12.

-「알기쉬운 주거복지 서비스 안내서」제작 및 배포(3월~)

- 순환형 임대주택 ․ 집수리학교 운영 및 주거정책 세미나 개최 등

○ 전세사기 피해 예방교육 및 서비스 지원(대학생 등 청년 가구)	: ’24. 3. ∼ 12.

○ 탄소중립 실천을 위한 주택난방 플랫폼 시범운영	: ’24. 3. ∼ 12.

- 탄소매트 난방교체, 태양광 설치 및 주택난방 전환가구 모니터링 분석·개선 모색

공공주택팀

청년 매입임대주택 공급

민간 주택을 전주시에서 매입 후 대학생 및 취업준비생 등 청년층의 주거 안정을 위하여 시세보다 저렴하게 월세로 임대

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내

○ 사업기간 : 2024. ∼ 2025.

○ 사 업 비 : 4,100백만원(국 1,620 시 2,480)

○ 사업규모 : 청년매입임대주택 36호(기존주택 24호, 신축매입 12호)

○ 사업내용 : 기존주택 또는 민간사업자가 신축하는 주택을 매입하여 감정평가를 통해 산정한 임대료의 50%이하로 무주택 청년에게 임대

-  (민  간) 청년 매입임대주택을 설계·시공·임대운영 관리

-  (전주시) 민간사업자 공모 및 선정, 주택 매입(약정체결), 사용허가(민간위탁)

※ 공급실적 : 2019년∼2022년 / 7개소 / 82가구

□ 공급기준

○ 입주대상 : 19세이상 39세이하 청년, 대학생 및 취업준비생

(전년도 도시근로자 월평균소득 100% 이하인 자)

○ 거주기간 : 최초 2년, 2년 단위로 4회까지 재계약 가능(최대10년)

□ 추진상황

○ ’23년 국토부 매입임대주택 매입계획 승인(24호)	: ’23. 3.

○ ’23년 청년매입임대주택 신축매입약정형 민간사업자 공모 및 선정	: ’23. 6.∼10.

○ ’24년 청년매입임대주택 36호 물량 신청(시→국토부)	: ’23. 12.

- 청년매입임대주택 36호 물량배정 승인(24.1.)

□ 추진계획

○ ’23년분(24호) 공유재산관리계획 의회 동의 및 매입약정 체결	: ’24. 2.

○ ’23년분 청년매입임대주택 착공 및 준공	: ’24. 3.∼11.

○ ’24년 전주형 청년임대주택 공급계획 수립	: ’24. 3.

○ ’24년  청년매입임대주택 주택매입 공고(36호) 및 선정	: ’24. 4.∼7.

○ ’24년  청년매입임대주택 주택매입 추진	: ’24. 8.∼

공공주택팀

청년(신혼부부) 주거안정 지원

안정적인 주거환경 조성을 위하여 청년(신혼부부)의 임대보증금 및 전세보증금반환보증 보증료 지원을 통한 주거자립 기반 마련

□ 신혼부부(청년) 임대보증금 지원사업

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2024. 1. ∼ 2024. 12.(예산소진시까지)

○ 사 업 비 : 3,340백만원(도비1,336, 시비2,004)

○ 사업규모 : 167가구

○ 사업내용 : 임대보증금 최대 2천만원 이내 지원(도비 별도 지급)

○ 수 혜 자 : 공공임대주택 입주(예정)자 중 혼인 7년 이내 신혼부부 및 미혼청년

□ 추진상황

○ ’23년 신혼부부 임대보증금 지원 : 167가구 / 3,319백만원

□ 추진계획

○ 지원 대상자 모집 및 선정	: ’24. 2. ∼

○ 1차 추경 시 추가 예산 확보(시비 704백만원)	: ’24. 상반기

□ 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2024. 1. ∼ 2024. 12.(예산소진시까지)

○ 사 업 비 : 375백만원(국비187, 도비56, 시비132)

○ 사업규모 : 1,166가구

○ 사업내용 : 전세보증금반환보증 보증료 최대 30만원 지원

○ 수 혜 자 : 임대보증금 3억원 이하 무주택자로서

연소득 청년 5천만원/청년 외 6천만원/신혼부부 7.5천만원 이하인 자

□ 추진상황

○ ’23년 청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원 : 142가구 / 30백만원

□ 추진계획

○ 지원 대상자 모집 및 선정	: ’24. 2. ∼

○ 1차 추경 시 추가 예산 확보(시비 116백만원)	: ’24. 상반기

주택관리팀

주택관리 지원사업 추진

주거취약계층의 주택점검과 보수, 주택관리 교육, 집수리용 공구대여 및 마을환경 개선사업 등을 통한 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2024. 1. ∼ 12.

○ 사 업 비 : 286백만원(시비246, 도비40)

○ 사업내용 : 단독, 다세대, 연립주택 점검보수 및 서서학동 벽화보수 등

※공공 임대주택 대상제외 (LH 및 전북개발공사 등)

○ 지원대상 : 고령자(65세이상), 장애인, 중위소득 60%이하(수급자, 차상위자 등)

□ 추진상황

○ 주택점검, 보수 등 서비스 실적(4,790가구/18,639건)	: ’23. 1.∼12.

서비스구분	계	건축설비	전 기	클린(위생)	기타 (설치지원 및 상담 등)
건 수	18,639	3,891	5,980	2,155	6,613

※ 2022년 대비 처리건수 13.4% 증가(3,908가구 / 16,434건)

○ 집수리용 공구 무상대여(778건)	: ’23. 1.∼12.

○ 주민참여 마을개선사업 추진(2개소)	: ’23. 2.∼ 3.

- 산책로 환경개선, 분리수거장 정비

○ 주거복지센터 연계 집수리교육 실시(2회)	: ’23. 5.∼12.

○ 동절기 취약계층 주택관리 서비스 제공(100가구)	: ’23. 10.∼’24. 1.

- 동 주민센터와 연계하여 가스화재 예방 및 동파방지 시공

□ 추진계획

○ 주거취약계층 주택관리 지원사업 지속 추진	: ’24. 1.∼

○ 지속적인 사업홍보 및 수혜가구 조사	: ’24. 1.∼

○ 서서학동 노후벽면 보수사업(지역밀착형 도민제안사업)	: ’24. 2.∼ 4.

옥외광고물팀

불법광고물 없는 깨끗한 거리 조성

현수막 지정게시대 확충과 새로운 광고매체인 전자게시대를 시범 설치하고 지속적인 불법광고물 강력 단속으로 깨끗한 도시경관 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2024. 1. ∼ 12.

○ 사 업 비 : 524백만원

- 게시대 설치 300, 주인없는 간판 정비 36, 불법광고물 정비용역 38, 수거보상제 150

○ 사업내용 : 전자게시대 및 현수막지정게시대 확충(전자 1대 / 다단 60면 / 저단 15면),

불법광고물 정비 및 용역 시행, 수거보상제 운영 등

□ 추진상황

○ 불법광고물 상시 정비 및 단속	: ’23. 1.∼12.

정비실적(건)						과태료 부과 실적
계	현수막	벽보	전단	입간판	에어라이트	건수	금액(천원)
58,409	50,039	2,238	2,957	1,625	1,550	132	519,110

○ 취약시기별 일제 정비(7회)	: ’23. 1.∼12.

○ 현수막 게시대 200면 확충(다단 120면, 저단 80면)	: ’23. 2.∼12.

※ 게시대 현황 : 304개소 1,352면(상업 1,133면, 행정 219면 / 다단 1,168면, 저단 184면)

○ 현수막 게시대 관리기관 일원화 ⇒시설관리공단	: ’23. 7.

□ 추진계획

○ 불법광고물 근절을 위한 상시 및 취약시기별 일제정비 추진	: ’24. 1.∼12.

○ 불법광고물 정비용역 및 수거보상제 실시	: ’24. 1.∼12.

○ 전자게시대 설치·운영 계획 검토 및 수립	: ’24. 2.∼4.

○ 전자게시대 설치 및 시범운영	: ’24. 4.∼12.

○ 현수막 게시대 75면 확충 추진	: ’24. 4.∼12.

도로과  소 관

□	서곡교 사거리 교통개선사업	----	34
□	장기미집행 도시계획도로 보상	----	35
□	정여립로(국립박물관∼콩쥐팥쥐로 간) 확장공사	----	36
□	황방산 터널 개통	----	37
□	아중호수길 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	----	38
□	보행환경 특화거리 조성사업	----	39
□	충경로 도로환경개선사업	----	40
□	회전교차로 설치사업	----	41
□	교통사고 잦은 곳 개선사업	----	42
	가로등 조도 및 에너지 효율 개선사업	----	43

도로계획팀

서곡교 사거리 교통개선사업

서곡교∼홍산교 일대 사거리의 상습정체 해소와 주민들의 안전한 차량소통을 위해 교통개선사업을 추진하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 서신동 660-11번지 일원 (서곡교 일원)

○ 사업내용 : 차로 재분배 및 확장을 통한 혼잡도로 개선 L=300m

○ 총사업비 : 2,700백만원(특교세 900, 시비 1,800)

- 기확보 : 1,700백만원(23년 1,000(특교세900, 시비100), 24년 700(시비))

○ 사업기간 : 2023. 5. ~ 2025. 6. (2년)

□ 추진상황

○ 실시설계 용역 착수	: ’23. 5.

○ 현황분석 및 개선방안 검토	: ’23. 6. ∼ 8.

○ 교통개선(안) 사전협의	: ’23. 9. ∼ 10.

○ 관계기관(부서) 협의	: ’23. 11. ∼  ’24. 1.

- 경찰서, 도로교통공단, 교통안전과 등

□ 추진계획

○ 일상감사 등 행정절차 이행	: ’24. 2.

○ 공사 발주	: ’24. 3.

○ 공사 완료 추진	: ’24. 3. ∼  ’25. 6.

도로시설팀

장기미집행 도시계획도로 보상

2020년 7월 장기미집행 도시계획시설 일몰제 시행에 따라 존치하기로  결정한 도시계획 도로에 편입되는 토지를 우선순위에 따라 매입

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 일원

○ 사업규모 : 장기미집행 도시계획도로 21개노선 토지 보상

- (광로 및 대로 8) 기린대로, 과학로, 완주로, 동부대로, 삼례로, 건산로, 전진로, 쑥고개로

- (중로 13) 중인1길, 호동길, 노송광장로, 평화로, 솔내로, 팔복로, 용소로, 비석날로, 서귀로, 여산로, 오송로, 원만성로, 천마산로

※ 도로 101개 노선은 2020. 7. 1일자 실효고시 완료

○ 총사업비 : 74,400백만원

- 기확보 : 54,500백만원(23년까지 39,500, 24년 15,000)

○ 사업기간 : 2020. ∼ 2025. (5년)

□ 추진상황

○ 장기미집행 도시계획도로 관리계획 변경(안)수립	: ’19.  8.

○ 장기미집행 도시계획도로 실시설계용역 착수	: ’19.  8.

○ 토지 보상계획 수립(우선순위 검토)	: ’20.  1.

○ 실시계획인가 고시(21개노선 935필지 138,684㎡)	: ’20.  6.

○ 보상현황(416필지 68,175㎡, 36,941백만원 보상(49.6%)) - 보상완료 3개노선

□ 추진계획

○ 지속적으로 보상 협의 추진	: ∼ ’25. 6.

도로시설팀

정여립로(국립박물관∼콩쥐팥쥐로 간) 확장공사

혁신도시와 효천지구를 잇는 주간선도로로 도시개발에 따른 교통량 증가함에 따라 도로 확장 필요

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 삼천동3가 국립박물관∼상림동 콩쥐팥쥐로

○ 사업규모 : 도로확장 L=4.95㎞, B= 15m ∼ 25m → 35m

○ 총사업비 : 27,000백만원

- 기확보 : 1,700백만원(23년까지 700, 24년 1,000)

○ 사업기간 : 2023 ∼ 2027년 (5년)

□ 추진상황

○ 쑥고개로∼자원순환단지 개설(L=2,15km, B=15m. 9,200백만원)	: ’03. ∼ ’06.

○ 자원순환단지∼콩쥐팥쥐로 개설(L=1.60km, B=15m, 6,200백만원)	: ’08. ∼ ’15.

○ 쑥고개로 보상(L=1.18km, B=35m, 3,000백만원)	: ’20. ∼ ’22.

- 전체 37필지 1,742㎡ 전구간 토지매입 완료

○ 실시설계 용역 착수	: ’23. 11. ∼

□ 추진계획

○ 공사 착공(쑥고개로 우선 추진)	: ’24.  2. ∼

○ 실시설계 용역 준공	: ’24. 10.

○ 연차별 공사 추진(정여립로)	: ’26. ∼ ’27.

도로시설팀

황방산 터널 개통

혁신도시와 서곡지구를 이어주는 황방산 터널(도로 1.85㎞)을 건설하여 혁신도시 고립 해소 및 서부권 교통난 완화

□ 사업개요

○ 위    치 : 혁신도시 정여립로 ∼ 서곡지구 천잠로

○ 사업규모 : 도로개설 L=1.85km(터널 0.8km), B=25m

○ 총사업비 : 80,000백만원(24년 400백만원)

○ 사업기간 : 2023. ∼ 2029. (7년)

□ 추진상황

○ 도시관리계획 정비 용역 추진	: ’22. 11.∼

○ 중기지방재정계획 반영	: ’23. 11.

□ 추진계획

○ 타당성조사 및 기본계획 수립용역	: ’24. ∼

○ 타당성조사(지방투자사업관리센터) 및 투자심사	: ’24. ∼ ’25.

○ 도시계획시설 결정	: ’25.

○ 기본 및 실시설계용역	: ’26. ∼

○ 보상 및 공사 추진	: ’27. ∼ ’29.

도로시설팀

아중호수길 급경사지 붕괴위험지역 정비사업

높이 20∼30m, 경사도 60°∼ 80°정도의 급경사이며 절리가 있고 풍화가 진행 중으로 정비사업을 시행하여 시민의 생명과 재산을 보호

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 우아동1가 산334-2번지 일원(저수지입구∼아중도서관)

○ 사업내용 : 급경사지 정비(L=240m, H=20∼30m), 도로개설(B=10m)

○ 총사업비 : 7,000백만원(국 3,500, 도 1,400, 시 2,100)

- 기확보 : 3,650백만원(23년까지 710, 24년 2,940)

○ 사업기간 : 2022. ∼ 2025. (4년)

□ 추진상황

○ 급경사지 비탈면 정밀안전점검(D등급 판정)   : ’22.  3.

○ D등급 판정에 따른 주민 설명회 개최	: ’22.  3.

○ 급경사지 붕괴위험지역 지정·고시	: ’22.  4.

○ ’23년 재해위험지역 정비사업 확정	: ’22.  9.

○ 실시설계용역 추진	: ’22. 10. ∼

○ 소규모 재해영향평가 및 설계안전성검토 용역 추진	: ’23. 11. ∼

○ 사전설계 검토(행정안전부) 승인	: ’24.  1.

○ 관계부서(기관) 협의 등	: ’24.  1. ∼

□ 추진계획

○ 붕괴위험지역 정비사업 실시계획 고시	: ’24.  2.

○ 일상감사 및 원가심사	: ’24.  2. ∼

○ 공사 추진	: ’24.  3. ∼ ’25. 12.

도로정비팀

보행환경 특화거리 조성사업

충경로(팔달로 ∼ 병무청 오거리), 현무1․2길 및 은행로 일원을 보행      친화적인 특화거리로 조성하여 보행환경 개선 및 구도심 활성화 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 충경로(충경로사거리∼병무청오거리) 및 현무1·2길, 은행로 일원

○ 사업규모 : L=2.7km, B=8∼25m

○ 사업내용 : 단차 없는 광장형 도로 조성, 보행자편의시설 설치 등

○ 사 업 비 : 10,000백만원(국비 50%, 시비 50%) *행안부 균특사업 道로 이양

- 기확보 : 8,900백만원(21년 40억, 22년 15.8억, 23년 33.2억)

○ 사업기간 : 2021. ∼ 2025. (5년)

□ 추진상황

○ 국비공모사업 선정(국비 50억)	: ’20.10.

○ 기본 및 실시설계용역(교통영향평가 등)	: ’21. 3. ∼

○ 행정절차 이행(경관·교통·도시림·계약심의,기술자문 등)	: ’21. 7. ∼ 12.

○ 총괄계획가 선정(행정안전부) 및 자문(10회)	: ’21. 7. ∼ 9.

○ 공사(토목/조경) 착공-현 공정율:60%	: ’22. 4. ∼ 6.

- 가로수 이식작업 및 원형 배수관로 매설 완료	: ’23. 6.

- 보도 및 차도 포장 작업	: ’23. 7. ∼ 12.

□ 추진계획

○ 보도포장 및 공사 완료(충경로 구간)	: ’24. 2. ∼ 5.

○ 은행로 추가 편입구간 실시설계 추진	: ’24. 2. ∼ 8.

○ 이면도로(현무1․2길, 은행로 일원) 공사 추진	: ’24. 3. ∼ ’25. 12.

도로정비팀

충경로 도로환경개선사업

충경로를 보행친화적인 특화거리로 조성하여 한옥마을 방문객을      원도심으로 유도하는 등 외연을 확장하여 구도심 활성화 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 충경로(충경로사거리∼다가교)

○ 사업규모 : L=0.7km, B=25m

○ 사업내용 : 단차 없는 광장형 도로, 자전거도로 등 조성

○ 사 업 비 : 13,000백만원(시비)

- 기확보 : 6,400백만원(18년 1억, 19년 5억, 20년 8억, 21년 40억, 22년 10억)

○ 사업기간 : 2018. ∼ 2024. (7년)

□ 추진상황(현 공정율 40%)

○ 기본구상 및 타당성 검토용역(학술용역)	: ’18. 11. ∼ ’19. 12.

○ 기본 및 실시설계용역 추진	: ’20. 1. ∼  ’22.  5.

- 행정절차(경관·교통·도시림·계약 심의 등) 이행	: ’21. 7. ∼ 12.

○ 민·관협의체 운영(20명)	: ’22. 6. ∼ 지속

- 주민운영위원회 제안사항에 대한 실무부서 검토의견 청취 및 협의

○ 공사 착공	: ’22. 1.

- 가로수 이식 및 원형 배수관로 매설	: ’23. 6.

- 보도 구간 기초콘크리트 타설	: ’23. 11.

□ 추진계획

○ 보도 및 차도 포장	: ’24. 3. ∼ ’24. 8.

○ 공사 준공	: ∼ ’24. 11.

도로정비팀

회전교차로 설치사업

교통신호 운영이 비효율적이거나 3개 이상의 도로가 교차하는 비신호 평면교차로를 회전교차로로 변경하여 교통사고를 예방하고 원활한 교통소통 도모

□ 사업개요

○ 사업위치 : 모악산자락길 교차로 등 15개소

○ 사업내용 : 교통섬 조정, 고원식 횡단보도 설치, 회전교차로 설치 등

○ 추진근거 : 회전교차로 기본계획수립, 회전교차로 설계지침

○ 총사업비 : 4,525백만원(도비 50%, 시비 50%)

- 기확보 : 2,125백만원(23년까지 725, 24년 1,400)

○ 사업기간 : 2023. ∼ 2026. (4년)

□ 추진상황

○ ’23년 회전교차로 실시설계(모악산자락길, 효열공원부근)	: ’23. 1. ∼ 5.

○ 공사추진(모악산자락길 부근)	: ’23. 7. ∼ 11.

○ ’24년 회전교차로 대상지 선정(2개소, 전북도 통보)	: ’23. 11.

- 혁신동 국민연금공단, 여의동 대한적십자사 부근

□ 추진계획

○ 실시설계용역 추진(국민연금공단부근 등 2개소)	: ’24. 2. ∼ 4.

○ 일상감사 등 행정절차 이행	: ’24. 4.

○ 공사추진(효열공원 등 3개소)	: ’24. 4. ∼ 11.

도로정비팀

교통사고 잦은 곳 개선사업

차량 통행이 불편하거나 교통사고 위험이 높은 도로의 구조개선 및 시설물을 정비하여 교통사고를 예방하고 운전자에게 교통편의 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내 18개소

○ 사업규모 : 교통섬 조정 및 설치, 고원식 교차로 설치, 무인단속장비 설치 등

○ 사 업 비 : 6,354백만원(도비 50%, 시비 50%)  *행안부 균특사업 道로 이양

- 기확보 : 2,628백만원(23년까지 1,424, 24년 1,204)

○ 사업기간 : 2022. ∼ 2026. (5년)

□ 추진상황

○ 공사 추진(화개네거리 등 10개소)	: ’22. 7. ∼  ’23. 11.

○ ’24년 사업대상지 선정(2개소, 전북도 통보)        : ’23. 11.

- 호성동 차량등록사업소 사거리 외 1개소

□ 추진계획

○ 실시설계용역 추진	: ’24. 2. ∼ 4.

○ 일상감사 등 행정절차 이행	: ’24. 4.

○ 공사추진	: ’24. 4. ∼ 11.

도로정비팀

가로등 조도 및 에너지 효율 개선사업

에너지 효율이 낮고 노후된 나트륨 및 메탈 등을 밝고 내구성이 좋은LED등으로 교체, 조도를 개선하여 야간 통행 불편 해소 및 에너지 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내

○ 사업내용 : 고효율 LED등 교체를 통한 조도 및 에너지효율개선

○ 사업규모 : 노후 가로등(메탈·나트륨) 38,787등 단계적 교체

○ 총사업비 : 27,400백만원

- 기확보 : 5,800백만원(23년 3,800, 24년 2,000)

○ 사업기간 : 2023. ∼ 2026 (4년)

□ 추진상황

○ 도로 조명 설치 및 LED 규제 완화 계획수립	: ’23. 1.

○ LED 표준 규격 개정(AC직결형 반영, 효율 기준 완화)	: ’23. 2.

○ 도로 조명 조도 및 에너지 효율 연차별 계획 수립	: ’23. 3.

○ 조명 시설 전수조사 및 조도 개선계획 수립 용역 착수	: ’23. 4.

○ 23년도 조도 및 에너지 효율 개선 공사	: ’23. 5. ∼ 12.

- 추진실적 : 4,351등 교체 / 38억원

□ 추진계획

○ 조도 개선계획 수립 용역 결과에 따른 사업 연간 계획 수립	: ’24. 2.

○ 24년도 조도 및 에너지 효율 개선 공사 추진	: ’24. 3. ∼ 12.

- 규모 : 2,100등 교체 / 20억원

○ 연차별 조도 및 에너지 효율 개선사업 지속 추진	: ’25. ∼ ’26.

- 규모 : 32,336등 교체 / 216억원 정도

하천관리과 소관

□	전주천․삼천 명품하천 365 프로젝트	----	45
□	전주천․삼천 화장실 확충	----	46
□	전주천․삼천 재해예방 하도정비사업	----	47
□	생태하천 복원사업(아중천)	----	48
□	지방하천 정비사업(금학천, 원당천, 가동천, 조경천)	----	49
□	객사천 재해위험지구 정비사업	----	50
□	비점오염저감시설 및 수질오염총량 관리	----	51
□	소류지 생태공원 운영	----	52

하천계획팀

전주천․삼천 명품하천 365 프로젝트

치수 안정성을 확보하고 시민휴식, 문화향유 공간을 조성하여 전주천과 삼천을 안전하고 쾌적한 명품하천으로 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주천 및 삼천 일대

○ 사업기간 : 2022. 12. ∼ 2030. 12. (8년)

○ 총사업비 : 60,000백만원(국비 4,500, 시비 55,500)

○ 사업내용 : 하천 통합문화공간 조성 7개소(전주천 4개소, 삼천 3개소)

- 다목적광장, 공연장, 보행교, 물놀이장, 분수, 야간경관 등 친수공간 조성

□ 추진상황

○ 하천 종합정비계획수립 용역 착수	: ’22. 12.

○ 통합문화공간 조성을 위한 선진지 견학	: ’23. 1. ∼ 11.

○ 삼천(세내교∼추천대) 산책로 조도 개선	: ’23. 6. ∼ 12.

□ 추진계획

○ 전주천(한벽교∼신풍교) 산책로 조도개선	: ’24. 2. ∼  6.

○ 전주시 하천 종합정비계획 수립	: ’24. 4.

○ 통합문화공간 선도사업(4개소) 실시설계	: ’24. 4. ∼ 12.

- 전주천 3개소, 삼천 1개소

○ 통합문화공간 조성 추진	: ’25. ∼ ’30.

하천계획팀

전주천․삼천 화장실 확충

자연형 및 생태하천 조성사업을 통해 시민의 운동과 휴식공간으로 자리매김함에 따라 이용객의 편의를 도모하여 건강한 여가문화 확산

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주천 및 삼천 일대

○ 사업기간 : 2022. ∼ 2026. (5년)

○ 총사업비 : 2,000백만원(시비)

- 2023년 : 660백만원(시 300, 구청 360), 2024년 : 500백만원

○ 사업내용 : 화장실 설치 17개소, 안내판 설치 및 정비 등

□ 추진상황

○ 화장실 안내판 설치 완료(34개소)	: ’22. 11.∼’23. 1.

- 2022년 : 24개소(전주천 12, 삼천 12)

- 2023년 : 10개소(전주천 4, 삼천 6)

○ 공중화장실 설치사업 실시설계	: ’22. 11.∼’23. 5.

○ 공중화장실 설치(6개소) 완료	: ’23.  6.∼12.

- 전주천 : 자원봉사센터(6월), 한옥마을(9월), 명성강변APT(12월)

- 삼  천 : 마전교 파크골프장(6월), 효천교, 신평교(9월)

○ 공중화장실 설치사업(5개소) 실시설계 추진	: ’24.  1.∼3.

- 전주천 : 송원초 인근

- 삼  천 : 서신동 이편한세상APT, 더샾효자2차APT, 원당교 인근

- 아중천 : 우아동 성당 인근

□ 추진계획

○ 공중화장실 설치(5개소)	: ’24.  2.∼6.

하천계획팀

전주천․삼천 재해예방 하도정비사업

전주천, 삼천의 하도 정비를 통해 통수단면 확보 등 치수 기능을 회복하여 하천 범람 등 하천재해 사전예방

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주천(승암교~삼천 합류점), 삼천(세내교~전주천 합류점)

○ 사 업 비 : 2,250백만원(시비 1,712, 국비 538)

- 2023년 예산 : 1,538백만원(시 1,000, 국 538) / 2024년 예산 : 712백만원(시비)

○ 사업기간 : 2022. ∼ 2024년(3개년)

○ 사업내용 : 퇴적토 준설 159,611㎡, 지장 수목 제거 1식

□ 추진상황

○ 퇴적토 준설 완료(6개소, 43,723㎡)	: ’23. 1. ∼ 12.

- (23. 1~ 6.) 전주천 서신보, 쌍다리 인근 / 삼천 이동교, 서문초 인근

- (23.10~12.) 전주천 한벽교 인근 / 삼천 중복천 합류점 인근

○ 버드나무 제거작업(전주천 120주, 삼천 140주)	: ’23. 2. ∼  3.

○ 지장수목 제거작업	: ’23. 6. ∼ 12.

- 전주천 쌍다리, 백제교~사평교, 한벽교 인근 / 삼천 우림교~이동교

□ 추진계획

○ 퇴적토 준설 추진(2개소, 55,090㎡)	: ’23. 11.∼’24. 4.

- 전주천 가련교∼금학보(29,830㎡)/삼천 효자교∼마전교(25,260㎡)

○ 퇴적토 준설(2개소, 60,798㎡)	: ’24. 2. ∼  6.

- 전주천 오목교 인근(5,400㎡)/삼천 마전교~전주천 합류점(55,398㎡)

○ 지장수목 제거작업(전주천, 삼천)	: ’24. 1. ∼ 12.

하천시설팀

생태하천 복원사업(아중천)

생태하천 복원으로 자연과 인간이 공존하는 시민 휴식 공간을 조성하고 수생태계 건강성 확보를 통해 새만금 수질개선 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 재전마을(우아동1가) ~ 소양천(국) 합류점

○ 사업기간 : 2017. ∼ 2025. (9년)

○ 총사업비 : 36,352백만원(국·도 18,176 시 18,176)

- ’23년까지 23,873백만원 / 24년 예산 : 3,700백만원(도비 1,700, 시비 2,000)

○ 사업내용 : 생태하천 복원 L=7km, 교량 8개소, 자연형 여울 4개소 등

- 1공구(상류부) : 축제 및 호안 L=4.7㎞, 교량 6개소 등

- 2공구(하류부) : 교량 2개소, 자연형여울 4개소, 비점오염저감시설 2개소 등

- 조경공(상하류) : 교목 및 관목식재, 생태탐방로, 생태습지 1개소 등

□ 추진상황

○ 공사 추진 - 공정률 31%	: ’19. 12.∼
- 1공구 : 하천기본계획(변경) 수립 및 교량 2개소(아중3·5교) 재가설완료

- 2공구 : 1·2차분 사업 완료(자연형여울 4개소, 비점오염저감시설 설치 등)

○ 생태하천 복원사업 사업계획 변경승인(환경청)	: ’23. 6.

- 교량 확장 2개소 및 제방도로(좌안) 포장 반영 등

□ 추진계획

○ (아중천) 연차별 사업 추진	: ∼ ’25. 12.

- 24년 추진계획 : 교량 2개소(아중4교 외 1개소) 및 제방정비 L=0.5km 등

하천시설팀

지방하천 정비사업(금학천, 원당천, 가동천, 조경천)

하천 개수를 통해 통수 능력을 증대·홍수 피해를 방지하고 생태하천으로 조성하여 수생태계 건강성 확보 및 시민에게 휴식공간 제공

□ 사업개요

구 분		위 치	사업규모	사업비 (백만원)	사업 기간
4개소				58,787
1	금학천	전주페이퍼 ∼ 전주천(국가)	하천정비 L=2.2km, 배수펌프장 1개소 등	23,148	’16~’24
2	원당천	내원당마을 ∼ 전주천(지방)	하천정비 L=1.5km, 교량 9개소	9,043	’18~’26
3	가동천	완산구 덕천사 ∼ 삼천(지방)	하천정비 L=2.6km, 교량 10개소	11,396	’19~’26
4	조경천	덕진연못 ∼ 전주천(국가)	하천정비 L=0.7km, 교량 2개소 등	15,200	’24~’28

□ 추진상황

○ (금학천) 공사 추진 - 공정률 93%	: ’18. 12.∼
- 하천공사 준공(’22. 10.), 배수펌프장 공사 중

○ (원당천) 설계용역 추진 - 공정률 95%	: ’18. 11.∼

- 하천기본계획 변경심의(~’23. 8.), 기술자문 심의(’23. 9.), 설계경제성검토(’23. 11.)

○ (가동천) 토지 등 보상 추진 - 보상률 62%	: ’22.  5.∼

- 설계완료(’21. 12.), 사업시행 고시(’21. 12.), 보상계획 공고(’22. 1.)

○ (조경천) 사업계획 변경(지방비⇒국비)완료	: ’24.  1.

- 조경천 유지용수 사전협의(’23. 1, 2,000톤/일), 실시설계용역 발주 (’24. 2)

□ 추진계획

○ (금학천) 배수펌프장 시운전, 공사 준공	: ∼’24. 6.

○ (원당천) 설계 완료 및 토지 등 보상추진, 공사발주	: ’24. 6.∼

○ (가동천) 토지 및 지장물 수용재결, 공사발주	: ’24. 3.∼

○ (조경천) 기본 및 실시설계용역 추진(지방환경청)	: ’24. 3.∼

하천시설팀

객사천 재해위험지구 정비사업

자연재해위험 개선지구로 지정된 객사천 정비를 통해 침수피해 및 하천 범람 등 하천 재해를 예방하고, 쾌적하고 안전한 하천환경 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 대성동 고덕산장(산61-6) ∼ 전주천(지) 합류점

○ 사업기간 : 2023. ∼ 2027.(5년)

○ 총사업비 : 36,840백만원(균특 18,420, 도 7,368, 시 11,052)

- 예산확보액: 2,452백만원(국비 1,584,  도비 634, 시비 234)

○ 사업내용 : 소하천정비 L=1.9km, 축제 및 호안정비 L=1.4㎞

교량 재가설 9개소, 저류시설 1식

□ 추진상황

○ 전주시 자연재해저감 종합계획 반영	: ’22. 3.

○ 자연재해위험개선지구 정비사업(국비보조사업) 신청	: ’22. 3.

○ 자연재해위험개선지구 지정	: ’22. 7.

○ 자연재해위험개선지구 정비사업(국비보조사업) 확정	: ’22. 9.

○ 기본 및 실시설계용역 착수	: ’23. 6.

□ 금후계획

○ 행안부 사전설계 협의 등 기본설계	: ’24. 2. ∼ 6.

○ 사업시행 계획 등 행정절차 이행	: ’24. 6. ∼ 11.

○ 기본 및 실시설계용역 완료	: ’24. 12.

○ 토지 및 지장물 보상, 공사추진	: ’25. 1.∼’27.12.

물순환관리팀

비점오염저감시설 및 수질오염총량 관리

강우시 발생되는 수질오염물질 저감 등 총량관리 단위유역별 배출 부하량을 관리하여 금강수계 목표수질 달성 및 하천수질 개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내

○ 사업기간 : 2024. 1. ∼ 12.

○ 사 업 비 : 613백만원(시비 536, 기금 77)

○ 사업내용 : 비점오염저감시설(55개소) 및 LID(저영향개발)시설 유지관리‧모니터링, 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 및 기본‧시행계획 변경

□ 추진상황

○ 비점오염저감시설 및 LID시설 유지관리‧모니터링	: ’23. 1.∼12.

- 비점오염저감시설(혁신‧만성‧에코‧효천)

- LID시설(덕진공원 유역 식생수로, 침투측구 등)

○ 2022년 수질오염총량관리 시행계획 이행평가	: ’23. 3. ∼12.

○ 제4단계 금강수계 수질오염총량관리 기본 및 시행계획 변경 추진	: ’23. 5. ∼

- 전주A 단위유역 추가 삭감부하량을 활용하여, 전주시 단위유역 할당부하량 추가 확보

□ 추진계획

○ 비점오염저감시설 및 LID시설 유지관리·모니터링 추진	: ’24. 1.∼12.

○ 2023년 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 추진	: ’24. 2.∼12.

○ 제4단계 금강수계 수질오염총량관리 기본 및 시행계획 변경 준공	: ’24. 4.

물순환관리팀

소류지 생태공원 운영

물길상류 소류지 생태공원에 대한 오염원 제거, 각종 편의시설을 유지관리하여 시민에게 쾌적한 이용환경 제공

□ 사업개요

○ 사업위치 : 소류지 9개소

①오송제 ②지시제 ③성곡제 ④서은제 ⑤황학제 ⑥구주제 ⑦삼산제 ⑧맏내제 ⑨신덕제

○ 사업기간 : 2024. 1. ∼ 12.

○ 사 업 비 : 168백만원(도비 16, 시비 152)

○ 사업내용 : 잡초제거, 시설물(안내판, 편의시설 등) 정비, 수질관리 등

□ 추진상황

○ 소류지 생태공원 유지관리 추진	: ’23. 1. ∼ 12.

- 수목 식재, 제초(연2~3회) 및 수초 제거

- 시설물(정자, 의자 등) 정비

○ 옛도랑 복원사업 추진	: ’23. 1. ∼ 12.

- 수초 및 수중 쓰레기 제거, 예초 등

□ 추진계획

○ 소류지 9개소 유지관리 추진	: ’24. 1. ∼ 12.

○ 옛도랑 복원사업 추진	: ’24. 1. ∼ 12.